하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 주요성과
□	2017 주요업무 결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수종말처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전

일   반   현   황

□ 기          구

							하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리			지하수			폐수처리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	31	1	9	5	7	9
현 원	31	1	10	10	6	4
증 감			1	5	▵1	▵5

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 오산 문화마을 하수관거 정비사업, 천서․왕궁지구 하수관거 정비사업, 화정 소규모마을 하수처리장 설치 사업, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 마을하수처리시설 운영 및 유지관리, 하수중계펌프장 운영 및 유지관리, CSOs 운영 및 유지관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과
◦	폐수처리 :	공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영관리, 산업단지 폐수 유입 승인, 배수설비 신고, 비용부담금 부과징수 등

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2016. 12.	비 고
시설	총인구	천명	300
	하수인구	천명	265
	보급률	%	88.3
하수처리	1일평균하수발생량	톤	118,295
	1일평균하수처리량	톤	115,906
	하수처리율	%	98.0
하수도 사용	개소수	전	38,351
	톤당 평균요금	원	442.39

□ 하수처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	27	139,521㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 ((주) 전북엔비텍)
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,671㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 ((주) 전북엔비텍)

2017 예산집행실적

【 2017. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
하수도과				68,948,100	39,899,286	29,048,814	57.9
	하수도사업비용			35,590,433	26,183,749	9,406,684	73.6
		영업비용		35,285,129	26,181,182	9,103,947	74.2
			관거비	16,518,522	11,387,360	5,131,162	68.9
			펌프장비	269,466	133,054	136,412	49.4
			처리장비	15,488,387	12,639,692	2,848,695	81.6
			일반관리비	3,008,754	2,021,076	987,678	67.2
		영업외비용		3,800	2,567	1,233	67.6
			차입금이자상환	3,800	2,567	1,233	67.6
		예비비		301,504	0	301,504	0
			예비비	301,504	0	301,504	0
	자본적지출			33,357,667	13,715,537	19,642,130	41.1
		유형자산취득		26,958,166	9,411,127	17,547,039	34.9
			구축물	26,157,386	9,243,642	16,913,744	35.3
			기계장치	376,000	0	376,000	0
			차량운반구	20,000	0	20,000	0
			공기구비품	36,300	10,146	26,154	28.0
			건설중인자산	368,480	157,339	211,141	42.7
		비가동설비자산취득		661,960	535,567	126,393	80.9
			건설중인자산	661,960	535,567	126,393	80.9
		비유동부채상환		177,200	132,900	44,300	75.0
			정부차입금원금상환	177,200	132,900	44,300	75.0
		기타자본적지출		3,680,156	3,635,943	44,213	98.8
			기타자본적지출	3,680,156	3,635943	44,213	98.8
		예비비		1,880,185	0	1,880,185	0
			예비비	1,880,185	0	1,880,185	0

2017 주요 성과

□ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

◦ 천서왕궁지구 하수관거 정비사업 완료

▸ 관거정비 44.0km, 배수설비 815개소

◦ 화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업 완료

▸ 관거정비 7.2km, 배수설비 264개소

□ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

◦ 익산공공하수처리장 원심탈수기로 교체(2017년 6월 준공)

▸ 7 ~ 9월 3개월간 일평균 33톤 감소하여 270백만원 절감

◦ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

□ 하수슬러지 처리시설 설치사업 중단에 따른 지방교부세 삭감에 대한 대응

◦ 사업 부적정 추진에 대한 패널티로 지방교부세 삭감 심의

▸ ‘15년 정부합동감사 시 지적금액 112억68백만원

▸ 적극적 논리개발 및 발빠른 대응으로 최종 제외

□ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

◦ 하수도 정비 : 34건 3.755㎞, 하수도기계준설 : 5건 2,890㎥

◦ 하수생활민원 처리를 위한 직원 비상근무조 편성운영 : 2,128건

▸ 맨홀 및 하수도 준설 744건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차

조정 등 1384건 실시

□ 반      성

◦ 배수설비 설치 및 정화조 폐쇄에 따른 주민안내 미흡

▸ 분류식하수관거 공사 시행에 따른 배수설비 사전조사가 이루어졌으나 가옥주 부재시 연락체계 미확립으로 배수설비 설치 시일 과다소요

2017 주요업무 결산

		남부2·3, 북부2처리분구 하수관거정비사업
		오산문화마을 하수관거 정비사업
		하수처리시설 운영 관리
		공공폐수처리시설 운영 관리
		읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사
		지하수 보조관측망 설치사업

1		남부2·3, 북부2처리분구 하수관거 정비사업

□ 위  치  도

남부2처리분구

남부3처리분구

북부2처리분구

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 남부2-3처리분구 (인화, 주현, 동산, 신흥동 일부)

북부2처리분구 (영등1, 신용동 일부)

◦ 규    모 : 오수관로 L=28km , 배수설비 3,200세대

◦ 사업기간 : 2017년 ∼ 2020년 (4개년)

◦ 총사업비 : 30,136백만원 (국비70%, 지방비30%)

▸ 2017년 : 1,500백만원 (국비490, 도비21, 시비939, 기금50)

◦ 추진공정 : 실시설계 추진중 (2017. 6.~ 2018. 4.)

□ 추 진 실 적

◦ 설계용역 원가심사(전라북도)	2017. 03. 05

◦ 설계용역 계약심사	2017. 03. 23

◦ 설계용역 사업수행능력평가서 제출공고	2017. 04. 24

◦ 설계용역 사업수행능력평가(PQ)	2017. 05. 26

◦ 설계용역 가격경쟁 입찰완료	2017. 06. 09

◦ 실시설계용역 착수	2017. 06. 19

□ 마무리 대책

◦ 재원협의, 원가심사, 설계자문위원회 등 행정절차 이행	2017. 12.∼2018. 03

◦ 실시설계용역 완료	2018. 04월 중

◦ 건설사업관리(전면책임감리)용역 발주	2018. 04월 중

◦ 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ)	2018. 05월 중

◦ 건설사업관리용역 착수	2018. 06월 중

◦ 시설공사 발주 및 착공	2018. 06. ∼ 07월 중

◦ 시설공사 완료	2020. 05월 중

2		오산문화마을 하수관거 정비사업

□ 위  치  도

마을하수처리장

(기존)

옥포마을

광지마을

월포마을

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 오산면 신지리 (광지, 옥포, 월포마을)

◦ 규    모  :  오수관로 L=8.6km, 배수설비 98세대

◦ 사업기간  :  2016 ∼ 2018년 (3개년)

◦ 사 업 비  :  4,372백만원 (국비70%, 지방비30%)

▸ 2016년  :  714백만원 (국비500, 도비21, 시비193)

▸ 2017년  :  3,658백만원 (국비2,560, 도비110, 시비860, 기금128)

◦ 추진공정  :  공정율 5%(공사기간 2017. 9. 15. ~ 2018. 8.)

□ 추 진 실 적

◦ 하수도정비기본계획 부분변경 승인	2017. 01. 24

◦ 설계심의 완료	2017. 04. 20

◦ 환경부 및 한국환경공단 재원협의 완료	2017. 06. 28

◦ 전라북도 원가심사 완료	2017. 07. 10

◦ 시설공사 착공	2017. 09. 15

□ 마무리 대책

◦ 시설공사  준공	2018. 08월

3		하수처리시설 운영 관리

□ 시 설 현 황

◦ 자체운영 : 여산 공공하수처리시설 외 20개소 2,191㎥/일

◦ 민간위탁 : 익산 공공하수처리시설 외 4개소 137,250㎥/일

▸ 기 간 : 2008. 6. 25. ~ 2028. 6. 24.

▸ 운 영 : ㈜전북엔비텍

◦ 사 업 비 : 15,145백만원(BTO 14,289, 처리장비 396, 대행사업 460)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하수처리시설 최적 운전으로 적정 수질관리 준수

▸ 수질분석 : 익산하수 외 4개소 1일 1회 분석 실시(상반기 755회)

▸ 분석결과 : BOD 외 5개 항목 적합

◦ 자체운영 공공하수처리시설 순회 및 수시점검	20개소/주1~2회

◦ 익산 공공하수처리시설 원심탈수기 설치공사	377,850천원

▸ 벨트 탈수기에서 원심 탈수기로 변경 하수찌꺼기 함수율 개선

◦ 함열 공공하수처리시설 여과기 일체운전 변경공사	68,530천원

▸ 총인설비의 상시 여과운전으로 인한 안정적 설비운영

□ 마무리 대책

◦ 춘포판문 시설물 철거 및 생활환경 개선 공사	2017. 09. ~ 11.

◦ 소규모 공공하수처리시설(삼기간촌) 개선공사	2017. 10. ~ 11.

◦ 수질 TMS 측정기기 교체 및 업그레이드	2017. 10. ~ 12..

4		공공폐수처리시설 운영 관리

□ 시 설 현 황

구 분	제3일반산업단지	국가식품클러스터
위 치	낭산면 산단구평길 143-46	왕궁면 왕궁리 887-8
위탁기간	2014. 7. ~ 2017. 6.	시운전 : 2017. 9. ~ 2017.12.
처리구역	제3, 4 산업단지 (3,297,168㎡)	국가식품클러스터 산업단지 (2,321,971㎡)
처리용량	5,500㎥/일	5,000㎥/일
처리공법	MBR(분리막) + IPR(총인)	KIMAS(분리막) + IPR(총인)
부대시설	중계펌프장 3,000㎥/일 오․폐수관거 24㎞	오․폐수관거 13.8㎞

□ 추 진 실 적

◦ 직영 통합관리 운영계획 수립	2017. 6. 15

◦ 통합관리 운영 조직 및 인력 구성	2017. 9월 ~ 10월

◦ 국가식품클러스터 준공 일정 연기	2017. 9. 19

▸ 준공일정 : 2017. 12월말 → 2018년 이후

▸ 유입 유량 부족으로 신뢰성운전 조건(500㎥/일 이상) 충족시까지 LH에서 운영

◦ 직영 사전 준비사항 이행	2017. 10월

□ 마무리 대책

◦ 제3산단 공공폐수처리시설 인수	2017. 11월

◦ 공공폐수처리시설 직영 운영

▸제3산단 → 2018. 1월, 국가식품클러스터 → 준공시 (2018. 6월이후~)

5		읍·면·동지역 하수도 시설 및 준설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(읍면동 일원)

◦ 총사업비 : 2,606백만원(국비 500 / 시비 2,106)

▸ 모현동 노후 하수관로 정비공사(명시)	500백만원

하수암거 보수보강 공사(2m×2m),  L = 130m

▸ 소규모 주민숙원사업, 하수도 생활민원처리	21건/1,623백만원

읍면동 하수도 시설공사 및 준설, 맨홀보수, 초기우수시설 유지보수

▸ 읍면동 생활환경개선사업(10건)	103백만원

▸ 읍면동 생활하수도 주민편성예산(2회 추경예산)	380백만원

◦ 사업기간 : 2017.  1  ~  12.

□ 추 진 실 적

◦ 모현동 노후 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2017. 4.~ 2017.10.

◦ 소규모 주민숙원사업, 생활하수도 추진 및 준공

▸ 읍면동 하수도 시설공사 및 준설 추진 완료	1,764백만원

◦ 읍면동 주민예산편성사업(12건) 완료	103백만원

□ 마무리 대책

◦ 모현동 노후 하수관로 정비공사 추진 및 준공	2017. 10. ~ 12

◦ 하수관거 준설, 생활환경정비사업 추진 및 준공	2017. 9. ~ 11

◦ 주민숙원사업, 생활하수도 주민편성예산 추진 및 준공	2017. 9. ~ 11

6		지하수 보조관측망 설치사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 9. ~ 2017. 11.

◦ 총사업비 : 45백만원

▸ 2017년도는 시범사업으로 기준관정을 활용하여 사업추진

◦ 사 업 량 : 4개소(기존공 활용)

◦ 내    용 : 지하수 자동관측시스템, 안내판설치 등

◦ 관측내용 : 지하수 수위, 전기전도도, 수온.

□ 추 진 실 적

◦ 설치 대상지 선정	2017. 7. ~ 2017. 8

▸ 익산시 소유로 굴착지름(100mm)이상인 관정을 선정

▸ 농업용 관정으로 사용농가가 비교적 적고, 농업기 이외에는 사용량이

거의 없는 지역 선정.

◦ 공 사   설 계	2017. 9

□ 마무리 대책

◦ 시스템 시험 운영 및 준공	2017. 10

◦ 시스템 운영 개시	2017. 11