도시재생과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 주요성과
□	2017 주요업무결산

비전 및 중점과제 추진 방향

	비 전
시민이 행복한 품격도시 익산건설을 위해 지역 균형적인 도시계획과 개발 및 관리

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	미래지향적인 도시계획수립 인간과 환경을 중시하는 도시개발사업 추진 시민중심의 도시문제 해소

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	시민이 공감하는 도시관리계획으로 지역간 균형발전 도모 친환경적이고 생활을 중시하는 도심 및 지역개발 원도심․생활환경 취약지역 중점개발로 여건개선 및 도시재생

일   반   현   황

□ 기     구

						도시재생과
재생행정			도시계획			도시개발				재생디자인			재생시설			자전거정책

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	25	1	1	6	7	6	4
현 원	24	1	1	7	10	2	3
증 감	△1			1	3	△4	△1

□ 사 무 분 장

◦ 재생행정  :  국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 개발행위 허가

◦ 도시계획  :  도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정

◦ 도시개발  :  도시계획 도로개설 사업 시행

◦ 재생디자인  :  도시재생활성화사업, 경관기본계획 및 공공디자인기본계획수립

◦ 재생시설  :  새뜰마을 사업, 도시재생 시설사업

◦ 자전거정책  :  자전거정책 수립, 자전거도로 계획수립 및 시행

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.925	76.091	214.809	194.046	21.979
비율(％)	100	15.0	42.4	38.3	4.3

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	76.091	17.835	1.869	10.888	45.499
비율(％)	100	23.4	2.5	14.3	59.8

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	경관지구	미관지구	고도지구	방화지구	보존지구 (역사문화환경 보존지구)	취락지구 (자 연 취락지구)	비 고
지구수	135	3	29	10	9	1	83
면 적	20,260	12,680	2,478	985	1,180	202	2,735

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : ㎡, %)

시 설 명		시설결정		집행시설		미집행시설		집행률 (%)
		개소	면적	개소	면적	개소	면적
총 계		2,089	32,105,756	1,673	26,060,223	416	6,045,533	81.2
도로	소 계	1,529	12,570,379	1,158	11,289,107	371	1,281,272	89.8
	광 로	6	1,245,244	5	1,160,250	1	84,994	93.2
	대 로	68	4,171,693	43	3,797,170	25	374,523	91.0
	중 로	359	4,511,828	298	4,119,791	61	392,037	91.3
	소 로	1,096	2,641,614	812	2,211,896	284	429,718	83.7
공원	소 계	103	5,962,607	81	1,867,650	22	4,094,957	31.3
	근린공원	50	5,330,117	31	1,451,990	19	3,878,127	27.2
	역사공원	2	76,461	1	50,593	1	25,868	66.2
	수변공원	2	28,021	1	8,475	1	19,546	30.2
	어린이공원	38	87,906	38	87,906	0	0	100.0
	소공원	9	35,083	9	35,083	0	0	100.0
	문화공원	1	35,279	1	35,279	0	0	100.0
	묘지공원	1	369,740	0	198,324	1	171,416	53.6
녹지	소 계	91	1,132,871	76	519,263	15	613,608	45.8
	완충녹지	75	1,071,947	61	461,909	14	610,038	43.1
	경관녹지	12	55,234	11	51,664	1	3,570	93.5
	연결녹지	4	5,690	4	5,690	0	0	100.0
기타	소 계	366	12,439,899	358	12,384,203	8	55,696	99.6
	주차장	49	149,033	49	149,033	0	0	100.0
	광 장	32	678,034	26	662,645	6	15,389	97.7
	공공청사	14	189,497	14	189,497	0	0	100.0
	유원지	1	31,200	0	0	1	31,200	-
	운동장	1	260,000	0	250,893	1	9,107	96.5
	기 타	269	11,132,135	269	11,132,135	0	0	100.0

2017 예산집행실적

【 2017. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비 율(%)	비고
도시재생과					18,919,278	9,069,053	9,850,225	47.9
일반회계					18,640,224	8,949,375	9,690,849	48
	도시개발관리				18,468,477	8,787,826	9,680,651	47.6
		도시계획			1,069,642	237,549	832,093	22.2
			도시계획관리		1,067,642	235,549	832,093	22.1
				일반운영비	60,536	22,666	37,868	37.4
				국내여비	42,000	29,634	12,366	70.6
				시책추진업무추진비	12,700	7,289	5,411	57.4
				시설비	652,406	25,960	626,446	4
				공기관등에 대한 자본적대행사업비	300,000	150,000	150,000	50
			도시계획관리(보조)		2,000	2,000	0	100
		도시계획도로개설(대로)			4,568,214	3,249,404	1,318,810	71.1
			산업도로(대로1류2호) 확장공사		1,098,809	1,023,989	74,820	93.2
			목천동원주@~우석장례예식장간 도로확장		535,059	400,010	135,049	74.8
			도‧농 연결도로개설		100,000	1,500	98,500	1.5
			안전한 보행환경조성사업		1,908,290	1,814,322	93,968	95.1
			마한로 미개설구간 도로개설		500,000	0	500,000	0
			KTX서부역사진입로확장사업		426,056	9,583	416,473	2.2
		도시계획도로개설(중로)			3,205,452	1,048,932	2,156,520	32.7
			모현동 배산~장신택지간 도로개설		2,488,511	842,049	1,646,462	33.8
			남부지구 중로2류43호 도로개설		157,641	116,035	41,606	73.6
			춘포면사무소~춘포역간 도로개설		200,000	33,183	166,817	16.6
			석방육교~도축장간 도로개설		60,000	55,765	4,235	92.9
			황등중로(2차)도로개설		299,300	1,900	297,400	0.6
		도시계획도로개설(소로)			3,440,096	1,690,180	1,749,916	49.1
			구 모현동사무소 옆 도로개설		1,023,410	593,108	430,302	58
			영등동 청아아파트옆외 3개노선 도로개설		30,000	22,773	7,227	75.9
			미불용지 보상		223,664	10,089	213,575	4.5
			송학동 망기마을 진입로 개설		405,838	328,164	77,674	80.9
			송학동 학곤선(소로3류66호)도로개설		200,000	1,119	198,881	0.6

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율(%)	비고
			모현동 소로3-49호선 도로개설	100,000	0	100,000	0.0
			금마시장 뒤 도로개설	250,000	16,484	233,516	6.6
			함열미력리(소로1류8호)도로개설	735,542	438,720	296,822	59.6
			황등도서관 진입로 확장공사	419,586	278,649	140,937	66.4
			함열농협옆도로개설	52,056	1,074	50,982	2.1
		신규 도시개발 사업		1,035,000	146,381	888,619	14.1
			용안면 한양식당 옆 도로개설	240,000	73,632	166,368	30.7
			모현동 롯데슈퍼 옆 도로개설	200,000	0	200,000	0
			송학동 포스코아파트 앞 도로개설	115,000	63,171	51,829	54.9
			어양동 함지박 옆 가각부 개선공사	140,000	943	139,057	0.7
			남중동 소로2류144호 도로개설	100,000	913	99,087	0.9
			마동도서관~연국사간 인도설치	10,000	0	10,000	0
			석왕동 길자동차 앞 선형개선 공사	70,000	7,722	62,278	11
			익산역 안내간판 설치공사	20,000	0	20,000	0
			황등면 신흥석재앞 교차로 가각부 개선공사	40,000	0	40,000	0
			신동(소로3-101)도로개설공사	100,000	0	100,000	0
		자전거도로이용시설활성화사업		290,000	195,085	94,915	67.3
		도시재생		4,111,402	2,030,825	2,080,577	49.4
			취약지역 개조(도시/새뜰마을사업)	3,069,906	1,688,903	1,381,003	55
			도시재생사업	105,098	21,404	83,694	20.4
			취약지역 개조(도시/동산동 월담지구 새뜰마을사업	836,398	266,622	569,776	31.9
			지역역량강화 (도시활력증진지역개발)	100,000	53,896	46,104	53.9
		도시경관디자인조성		748,671	189,470	559,201	25.3
			도시디자인	343,601	151,374	192,227	44.1
			도시경관개선사업	310,500	0	310,500	0
			경관협정지원사업	94,570	38,096	56,474	40.3
	재무활동(도시재생과)			140,478	140,476	2	100
			내부거래지출	140,000	140,000	0	100
			보전지출	478	476	2	99.6
	행정운영경비			31,269	21,044	10,225	67.3
			기본경비	31,269	21,044	10,225	67.3
특별회계				279,054	119,678	159,376	42.8
		도시개발사업		65,488	20,489	44,999	31.3
		장기미집행도시계획		213,566	99,189	114,377	46.4

2017 주요성과

□ 성      과

◦ 도시재생 사업으로 원도심 지역 활성화에 기여

‣ 중앙동 문화예술의 거리 경관협정 지원사업 추진

- 에코어닝(체양), 지주 간판, 공공시설물 등 설치

‣ 도시재생 주민공동협의체 구성･운영 : 정기회의 11회, 선진지 견학 1회

‣ 도지재생 주민리더 양성 프로그램 운영 : 총 8회, 수료인원 34명

‣ 새뜰마을사업 슬레이트 지붕개량 및 빈집 정비 : 19가구

◦ 도시계획도로 개설을 통한 시민 편익증진 기여

‣산업도로(대로 1류2호)확장공사 준공(L=2.5km, B=20→35)

‣선화로안전한보행환경조성사업 1･2구간 준공(L=2.1km, B=20→35)

◦ 익산시민 자전거 보험 가입으로 자전거 이용 시민 안전성 확보

‣가입대상 : 익산시에 주민등록을 두고 거주하는 모든 시민

‣보험기간 : 2017. 3. 2. ~ 2018. 3. 1.

‣보험금액 : 100백만원

‣보장내용 : 사망 및 후유장애, 진단위로금, 사고처리 관련

□ 반      성

◦ 도시계획도로 개설사업의 경우 예산투입의 선택과 집중 미흡으로 장기간

지연되고 있어 마무리 위주의 사업 추진 노력 필요

2017 주요업무결산

		산업도로(대로1류2호)확장사업 도시관리계획(재정비)수립용역 선화로 안전한보행환경 조성사업 KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업 동산동 월담지구 새뜰마을사업 익산시기본경관계획재정비수립용역 목천동원주아파트～우석장례식장 도로확장

1		산업도로(대로1류2호) 확장 공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  : 팔봉 인디안매장 ~ 도시지역경계(덕기동 현대주유소)

◦ 사업규모  : L=2,516m , B=20⇒35m(대로1류2호)

◦ 사업기간  : 2008. 4. ~ 2017. 10.

◦ 사업내용  : 도시계획도로확장

◦ 총사업비  : 10,300백만원(공사 5,513･보상비 4,787)

※ 연도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	~2014년	2015년	2016년	2017년~
산업도로 확장공사	소계	10,300	6,731	1,022	2,061	486
	국비	3,732	3,732	-	-	-
	시비	6,523	2,999	1,022	2,016	486

□ 추 진 실 적

◦ 도로 확장공사 완료(1~7차 시행)	: 2010. 9. ~ 2017. 4. 3.

◦ 가로수 식재공사 착공	: 2017.  5.

▸길자동차 ~ 쌍릉사거리 / 이팝나무 71주

□ 마무리 대책

◦ 가로수 식재 공사 완공	: 2017. 10.

2		도시관리계획(재정비) 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업범위 : 익산시 전지역(506.925㎢) / 10년계획

◦ 사업기간 : 2016. 5. ~ 2018. 5.(24개월)

◦ 사 업 비 : 842백만원

◦ 내    용 : 익산시 도시관리계획 전반에 대한 재검토

▸익산시 여건변화를 수용한 용도지역․지구, 도시기반시설 계획 등 전반 재검토

▸관련법 개정 등 제도변화에 따른 후속조치(토지적성평가, 재해취약성분석 등)

□ 추 진 실 적

◦ 도시관리계획 용역 착수	: 2016. 5. 20.

◦ 현황조사 및 분석	: 2016. 5~2017. 5.

▸지역현황조사, 민원분석 및 현장조사

▸토지적성평가, 재해취약성분석, 교통성, 경관성, 사전재해영향성검토

◦ 장기미집행 도시계획시설 주민의견수렴	: 2016. 11 ~ 12.

▸방법 : 통·이장회의시 설명, 읍면동 주민센터에 관련도서 비치

◦ 장기미집행 도시계획시설 폐지(변경) 검토	: 2017. 1. ~ 6.

◦ 장기미집행 도시계획시설(시 결정사항) 폐지(변경)조서 작성	: 2017. 7. ~ 8.

□ 마무리 대책

◦ 장기미집행 도시계획시설(시 결정사항) 폐지(변경) 추진 : 2017. 9. ~ 11.

▸주민의견수렴, 관계기관 부서 협의, 도시계획위원회 심의 등

◦ 도시관리계획 재정비(안) 검토 및 작성	: 2017. 7. ~ 11.

◦ 주민의견수렴, 도시계획위원회 자문 등 관련 절차 이행 : 2017. 11. ~ 2018. 1.

◦ 전북도 결정신청, 도도시계획위원회 심의, 결정고시	: 2018. 2. ~ 5.

3		선화로 안전한 보행환경 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 중앙체육공원 ~ 원팔봉 삼거리

◦ 사업규모 : L=2,100m , B=20m⇒35m(대로1류5호)

▸1구간(중앙체육공원∼2공단사거리) L=1,260m

▸2구간(2공단사거리∼원팔봉삼거리) L=840m

◦ 사업기간 : 2010. 1. ～ 2017. 12.

◦ 사업내용 : 도시계획도로확장

◦ 총사업비 : 10,367백만원(공사비 5,027･보상비 5,340)

※ 연도별 투자계획                                 (단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	2014년이전	2015년	2016년	2017년~
선화로 안전한 보행환경 조성사업	소계	10,367	6,561	917	1,691	1,198
	국비	4,000	3,300	-	700	-
	시비	6,367	3,261	917	991	1,198

□ 추 진 실 적

◦ 도로 확장공사 완료(1~4차 시행)	: 2011. 9. ~ 2017. 9.  15.

4		KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원 (면적 : 35,089㎡)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4개년)

◦ 사업내용 : 도로개설, 철도변 완충녹지 정비, 도시가스공급, 경로당

신축, 집수리, 주민역량강화 및 마을공동체 지원사업 등

◦ 총사업비 : 6,924백만원(국비 4,368, 도비 616, 시비 1,940)

※ 연도별 투자현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년			2018년이후
			소계	확보	미확보
계	6,924	2,985	2,000	2,000		1,939
국비	4,368	2,090	1,070	1,070		1,208
도비	616	268	154	154		194
시비	1,940	627	776	776		537

□ 추 진 실 적

◦ 마스터플랜 수립용역 착수	: 2015. 11.

◦ 마스터플랜 검토위원회 승인(국토교통부)	: 2016. 8.

◦ 도로 개설공사 착수	: 2016. 10.

◦ 주민공동 이용시설 착수	: 2017. 4.

□ 마무리 대책

◦ 주민공동 이용시설 추진 및 준공	: 2017. 12.

◦ 도로 개설공사 완료	: 2018. 6.

◦ 연차적 계획에 의거 개별사업 추진	: 2018.1~2018.12

5		동산동 월담지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 동산동 356번지 일원(동산동 월담지구)

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2019.(4개년, 사업면적 약50,456㎡)

◦ 사업내용 : 주택정비 지원,  안전확보, 생활 ･ 위생인프라, 마을공동체

지원사업,  주민역량강화사업 등

◦ 사 업 비 : 3,849백만원(국비 2,694, 도비 347, 시비 808)

※ 연도별 투자현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년			2018년 이후
			소계	확보	미확보
총계	3,849	557	357	357		2,935
국비	2,694	390	250	250		2,054
도비	347	50	32	32		265
시비	808	117	75	75		616

□ 추 진 실 적

◦ 공모사업 선정	: 2016. 2.

◦ 마스터플랜 수립용역 착수	: 2016. 9.

◦ 우선추진사업 승인(축대 및 산사태위험지구 개선)  : 2017. 5.

□ 마무리 대책

◦ 마스터플랜 수립용역 승인	: 2017. 10.

◦ 우선추진사업 발주 및 추진	: 2017. 10. ~ 12

◦ 연차적 계획에 의거 개별사업 추진	: 2018.1 ~ 2019.12

6		익산시 기본경관계획 재정비 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역대상 : 익산시 전지역(506.925㎢)

◦ 용역기간 : 2017. 5. ~ 2018. 5.(12개월)

◦ 용 역 비 : 286백만원

◦ 내    용 : 익산시 기본경관계획 전반에 대한 재검토 및 공공디자인

진흥계획 수립

▸ 기본경관계획 재정비 : 경관․미관지구, 중점관리구역 재정비

▸ 공공디자인 진흥계획 수립 : 공공시설물디자인 가이드라인 수립

◦ 용역수행 : ㈜도화엔지니어링, ㈜도시경관연구소 율

□ 추 진 실 적

◦ 용역 착수	: 2017. 5. 23.

◦ 용역 착수 보고회	: 2017. 6. 2.

◦ 기초조사(경관의식 설문조사 등)	: 2017. 6. ~ 9.

□ 마무리 대책

◦ 기본경관 계획(안) 작성	: 2017. 10.~2017. 12.

◦ 주민공청회 및 관련기관 협의	: 2018. 1.~2018. 2.

◦ 의회의견 청취	: 2018. 3.

◦ 경관위원회 심의	: 2018. 4.

◦ 기본경관 계획 승인 및 공고	: 2018. 5.

7		목천동 원주아파트~우석장례식장 도로 확장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1187번지(원주아파트) 일원

◦ 사업규모 : L=670m , B=20m⇒35m(대로1류1호)

◦ 사업기간 : 2009. 03. ～ 2018. 12.

◦ 사업내용 : 도시계획도로확장

◦ 총사업비 : 4,900백만원(공사비 1,000･보상비 3,900)

※ 연도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	2014년이전	2015년	2016년	2017년	2018년이후
목천동원주아파트~ 우석장례식장 도로확장	소계	4,900	2,581	827	196	534	762
	국비	0	-	-	-	-	-
	시비	4,900	2,581	827	196	534	762

□ 추 진 실 적

◦ 도로 확․포장 공사 완료	: 2017. 10.

▸ 우수공, 상수공, 인도포설, 포장 등

◦ 가로수 식재 공사 완료	: 2017. 10.