건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 주요성과
□	2017 주요업무결산

비전 및 중점과제 추진 방향

	비 전
아름답고 깨끗한 녹색도시 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충 환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공 장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여 도로확포장으로지역간소통원활및통행불편해소 생태하천정비로생활환경개선및주민편익도모 조명시설설치로보행환경개선및야간통행불편해소

일   반   현   황

□ 기       구

											건 설 과
건설행정								도로시설					하천시설				하천관리							가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	22		1	5	11	3	2
현 원	22		1	7	9	0	5
증 감				2	△2	△3	3

□ 사 무 분 장

◦건설행정  : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결,

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반.

◦도로시설  : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업

관련협의 시․군도, 농어촌도로 확․포장사업 추진.

◦하천시설  : 하천 기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦하천관리  : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수부과, 생태하천관리

◦가로등관리  : 가로등․보안등 시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원.

□ 하 천 현 황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	89	304.7	79	268.4	304.7	161	143.7	52.8%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2		100%
지방하천	28	172.0	19	135.7	172.0	87.1	84.9	51%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	25.8	76.4	25%

□ 하 천 점 용 허 가 현황(2017년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	답	전	대지	계	답	전	대지
659	383	215	61	341,673	195,278	134,549	11,846

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
27,870등	18,553등	9,317등

□ 차량보유현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 3대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2017 예산집행실적

【 2017. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				27,816,971	11,229,717	16,587,254	40
	도로시설관리			15,613,083	8,525,315	7,087,768	55
		시·군도농어촌도로확·포장		5,854,203	2,235,471	3,618,732	38
			금마갈산~서편간 도로확·포장	50,000	0	50,000	0
			용동 삼정-두무간 도로확·포장	1,629,210	436,644	1,192,566	27	명시
			오산북영선(금몽~남전)도로확·포장	805,381	699,889	105,492	87	명시 사고
			춘포학연익산천제방간도로확포장	458,091	287,242	170,849	63	명시
			망성신성~관산간도로확·포장	200,000	7,144	192,856	4
			오산장신~만석간도로확·포장	200,000	0	200,000	0
			미불용지매입비 (시군농어촌도로)	100,000	31,237	68,763	31
			용안창리법성간 도로확·포장	200,000	0	200,000	0
			금마누동~신촌간도로확포장공사	100,000	7,228	92,772	7
			오산외용(외검선)도로확포장	100,000	31,306	68,694	31
			시군농어촌도로확·포장사업추진	5,000	3,770	1,230	75
			군도23호선도로·확포장	2,006,521	731.011	1,275,510	36	명시
		주민숙원사업		38,760	32,384	6,376	84
			국내여비	37,860	31,634	6,226	84
			시책추진업무추진비	900	750	150	83
		철도건널목개량사업		5,436,000	3,537,840	1,898,160	65
			평화육교재가설	5,103,000	3,514,990	1,588,010	69	명시
			국도23호오산 교차로 램프설치	333,000	22,850	310,150	7
		교통관리개선사업		384,000	121,327	262,673	32
			군도19호선(하발~신평교차로)교행장서설치	234,000	121,327	112,673	52
			낭산석천삼거리도로 구조개선	150,000	0	150,000	0

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		도로조명시설관리		3,900,120	2,598,293	1,301,827	67
			보안등신규설치	585,540	243,177	342,363	42	명시
			노후가로등정비	698,140	354,638	343,502	51
			가로등,보안등 유지관리	2,597,780	1,986,558	611,222	76
			가로등보수차량 운영유지비	18,660	13,920	4,740	75
	하천정비			12,128,792	2,641,654	9,487,138	22
		하천정비 및 유지관리		12,128,792	2,641,654	9,487,138	22
			하천제방유지 보수(자체)	1,029,828	229,510	800,318	22	명시 사고
			하천제방유지보수	82,899	48,340	34,559	58	명시
			소하천정비(생활)	2,540,156	547,104	1,993,052	22	명시 사고
			하천관리및유지관리 (해지천)	500,000	0	500,000	0
			국가하천유치관리 (4대강외)	294,312	43,250	251,062	15
			국가하천유치관리 (4대강)	595,221	31,755	563,466	5	명시
			왕궁천하천환경정비사업	4,746,376	1,391,679	3,354,697	29	게속비 이월
			동명천하천정비사업	800,000	350,016	449,984	44
			만경강물문학관진입도로개설공사	1,300,000	0	1,300,000	0
			지방천하천정비	40,000	0	40,000	0
			만경강친수구역지정용역	200,000	0	200,000	0
	재무활동(보전지출)			12,902	12,887	15	99
	행정운영경비			62,194	49,861	12,333	80
			인력운영비	35,000	24,949	10,051	71
			기본경비	27,194	24,912	2,282	92

2017 주요성과

□ 성      과

◦ 건설공사 편입용지 협의보상으로 공익사업 추진에 기여

▸사업지구 51개소(계속사업46개소, 신규사업5개소) 72%협의완료

▸구) 모현동 사무소 도로개설공사 수용재결 신청

◦ 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민  편익 증대

▸오산 북영선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.2㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 준공 : 2017. 8. 14.

▸용동 삼정~두무간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.21㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 40%

▸춘포 학연~익산천제방간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.74㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 90%

◦ 평화육교를 재가설하여 호남선 KTX 완전개통과 안전한 교통망 구축

▸평화육교 재가설 실시설계 용역 준공(3.31) 및 공사발주(4.14)

▸평화육교 재가설 공사 착공 및 공사추진	: 2017. 7. 18. ~ 현재

▸보상계획 열람공고	: 2017. 9. 25.

◦ 도로조명 설치로 조명환경개선 및 야간통행 불편해소

▸보안등이설 및 신규설치 186개소(243,176천원)	: 2017. 1. ~ 9.

▸노후가로등정비 및 유지보수 6개사업(354,637천원)	: 2017. 1. ~ 9.

2017 주요업무결산

		공익사업을위한용지보상 군도23호선도로확포장 평화육교재가설 시·군도및농어촌도로확·포장 왕궁천하천정비사업 동명천하천정비사업 소하천정비사업(오동정천,대판천) 만경강물문화관조성사업 도로조명시설조도개선

1		공익사업을 위한 용지보상

○ ○	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스를 제공 공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여

□ 현       황

구분	보상대상			보상실적				미보상 토지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	51	2,854	766,950	51	2,043	615,982	80%	51	811	150,968
도시개발과	26	733	122,910	26	411	61,169	50%	26	322	61,741
건 설 과	21	1,476	488,340	21	1,045	414,123	84%	21	431	74,217
도로관리과	1	41	7,965	1	26	6,163	77%	1	15	1,802
시민안전과	1	31	4,897	1	26	4,838	99%	1	5	59
타 기 관	2	573	142,838	2	535	129,689	91%	2	38	13,149

□ 추 진 실 적

◦보상계획 :51개노선 2,854필지 766,950㎡

◦보상실적 : 51개노선 2,043필지 615,982㎡

□ 마무리 대책

◦ 독려반 편성 운영하여 적극적인 보상업무 추진

◦ 협의기간 내 미협의자 개별방문 및 면담으로 집중 독려

◦ 해당 사업자별 현지 출장 보상협의 및 계약체결 추진

◦ 소액보상자, 노약자, 장애인 등  현지방문 보상민원 처리

2		군도23호선 도로확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2019. 12

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=16.5~20.5m(2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 125억원(공사비 90, 보상비 31, 기타 4)

□ 추 진 실 적

◦ 토지 분할 측량 및 공부 정리	: 2016. 1 ~ 2

◦ 토지보상 공람공고 및 감정평가 시행	: 2016. 2 ~ 5

◦ 보상협의 추진(2017년 예산확보액 20억)	: 2016. 6 ~ 현재

▸보상현황 : 총 248필지 51,900㎡ 중 95필지 24,958㎡ (48%)

◦ 지방재정투자(재)심사 승인(자체심사)	: 2017. 5. 19

▸총사업비 변경 : 78.2억원 → 125.3억원

▸사업기간 변경 : 2013. 6 ~ 2017. 12 → 2013. 6 ~ 2019. 12

□ 마무리 대책

◦ 편입용지 보상	: 2017. 11 ~ 2018. 02

◦ 공사추진	: 2018. 03 ~ 2019. 12

3		평화육교 재가설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2019. 12

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m(4차로 ⇒ 6차로 확장)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 익산시 190)

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

□ 추 진 실 적

◦ 공사 착공	: 2017.  7. 18

◦ 목천지역 비상대책위원회 사전협의	: 2017.  7

◦ 민원해소를 위한 관계기관 1,2차 사전협의	: 2017.  8 ~ 9

◦ 대체우회도로 확장계획 협의	: 2017.  9. 19

◦ 보상계획 열람공고(2017.9.25.~10.13)	: 2017.  9. 21

◦ 대체우회도로 확장계획(2→4차로) 확정	: 2017.  9. 26

□ 마무리 대책

◦ 편입토지 보상 및 수용재결	: 2017. 11 ~ 2018. 3

◦ 대체우회도로 설치	: 2018.  3 ~ 6

◦ 육교철거(전면통제 2018. 7 ~ 2019. 12)	: 2018.  7 ~ 12

◦ 육교 재가설	: 2019.  1 ~ 12

◦ 사업 완료	: 2020.  6

4		시․군도 및 농어촌도로 확․포장사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면, 용동면, 춘포면, 망성면, 금마면, 왕궁면, 용안면 일원

◦ 사업규모 :  L= 8.44km, B=5~20m

◦ 사 업 비 : 3,976백만원(10개사업, 이월예산 포함)

▸ 오산 북영선 도로확·포장공사                 :  805백만원

- L=1.2km, B=8m                (본 500, 명 281, 사 24)

▸ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사           : 1,629백만원

- L=1.21km, B=8m                 (명 658, 1회추경 971)

▸ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사    :  458백만원

- L=0.74km, B=8m                       (본 400, 명 58)

▸ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사           :  200백만원

- L=0.91km, B=7m                             (본 200)

▸ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사           :  100백만원

- L=0.93km, B=7m                             (본 100)

▸ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사           :  100백만원

- L=0.8km, B=7m                              (본 100)

▸ 군도 19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치 :  234백만원

- L=0.61km, B=0.7~2.7m            (본 200, 1회추경 34)

▸ 오산 장신~만석간 도로확·포장공사           :  200백만원

- L=1.61km, B=8m                        (1회추경 200)

▸ 용안 창리~법성간 도로확·포장공사           :  200백만원

- L=0.84km, B=8m                        (1회추경 200)

▸ 금마 갈산~서편간 도로확·포장공사           :  50백만원

- 미륵초교 매입지장물 철거                  (1회추경 50)

□ 추 진 실 적

◦ 오산 북영선 도로확·포장공사 추진

▸ 공사 준공	: 2017.  8. 14

◦ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사 추진(공정율 40%)

▸ 1차분 공사 준공	: 2017.  5. 19

▸ 2,3차분 착공 및 공사 추진	: 2017.  1 ~ 10

◦ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사 추진(공정율 90%)

▸ 공사 추진(토공,배수공,포장공 등)	: 2017.  2 ~ 10

※ 미매입 토지 수용재결 결정(8필지, 495.6㎡)  : 2017.  5

◦ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 감정평가 의뢰	: 2017.  2.  9

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상(19필지 2,524㎡)	: 2017.  3 ~ 10

◦ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 감정평가 의뢰	: 2017.  2.  9

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상(46필지 6,112㎡)	: 2017.  3 ~ 10

▸ 실시설계 용역 착수	: 2017.  7. 27

◦ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 감정평가 의뢰	: 2017.  2.  9

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상(14필지 2,582㎡)	: 2017.  3 ~ 10

▸ 실시설계 용역 착수	: 2017.  7. 25

◦ 군도 19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치

▸ 실시설계 용역 추진	: 2017.  2 ~ 4

▸ 공사 착공	: 2017.  6.  8

◦ 오산 장신~만석간 도로확·포장공사

▸ 실시설계 용역 착수	: 2017.  7. 25

◦ 용안 창리~법성간 도로확·포장공사

▸ 실시설계 용역 착수	: 2017.  7. 25

◦ 금마 갈산~서편간 도로확·포장공사

▸ 지장물 철거공사 착공	: 2017.  9. 18

□ 마무리 대책

◦ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사 추진

▸ 2, 3차분 공사 추진	: 2017. 11 ~ 12

◦ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사 추진

▸ 공사 추진(토공, 배수공, 포장공 등)	: 2017. 11

▸ 공사 준공	: 2017. 11월 중

◦ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 협의매수 추진	: 2017. 11~ 12

◦ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 협의매수 추진	: 2017. 11 ~ 12

◦ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 협의매수 추진	: 2017. 11 ~ 12

◦ 군도 19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치

▸ 공사 추진(구조물공, 포장공 등)	: 2017. 11

▸ 공사 준공	: 2017. 11월 중

◦ 오산 장신~만석간 도로확·포장공사

▸ 공사 발주 및 착공	: 2017. 11

▸ 공사 준공	: 2017. 12월 중

◦ 용안 창리~법성간 도로확·포장공사

▸ 토지분할 측량 및 공부정리	: 2017. 11

▸ 편입토지 및 지장물 협의매수 추진	: 2017. 11 ~ 12

◦ 금마 갈산~서편간 도로확·포장공사

▸ 공사 준공	: 2017. 11월 중

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2017년 예산액	금후 투자
	22개사업	L=28.34km B=8~20m	49,002	9,259	4,905	34,872
1	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8.0m	2,526	2,026	500		공정율 25%	오산 204 (북영선)
2	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	876	971		공정율 20%	용동 204 (삼두선)
3	춘포 학연~익산천간 도로확.포장	L=0.74km B=8.0m	569	169	400		용지 81%	춘포 201 (천서선)
4	군도23호 도로확포장공사	L=3.4km B=20.0m	12,500	1,420	2,000	9,080	용지 28%	군도 23호
5	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	306	200	859	용지 68%	망성 303 (신선선)
6	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	405	100	906	용지 56%	금마 102 (누부선)
7	오산 외용(외검)선 도로확.포장	L=0.80km B=8.0m	1,000	117	100	783	용지 83%	오산 201 (외검선)
8	군도19호선(하발~신평 교차로) 교행장소 설치	L=0.20km B=5.0m	200		234			군도 19호
9	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
10	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
11	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	1,786	274	200	1,312	용지 87%	오산 301 (용연선)	군도 1호
12	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
13	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190		785	용지 85%	함라 201 (진다선)
14	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180		1,692	용지 66%	군도 10호
15	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
16	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
17	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
18	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
19	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296		2,507	용지 57%	군도 21호
20	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127		2,093	용지 9%	춘포 103 (신화선)
21	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	30	200	616	설계완료	용안 203 (자석선)
22	삼기 석라선 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,400			1,400		삼기 203 (석라선)

5		왕궁천 하천정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리 ~ 춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2019

◦ 사 업 비 : 24,720백만원(국비 12,360 도비 4,944, 시비 7,416)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=9.25km

▸ 제방축조 및 보축, 교량 재가설 등

□ 추 진 실 적

◦ 전라북도 및 익산청 협의 완료	: 2017.  7.

◦ 편입토지 보상 추진	: 2017.  8.

▸486필지(196,137㎡) 중 152필지(59,063㎡) 보상 완료(30%)

◦ 주민설명회(2차)	: 2017. 10.

□ 마무리 대책

◦ 기술심의(전북도)	: 2017. 11.

◦ 총사업비 협의(익산청)	: 2017. 11.

◦ 감리용역 발주 및 원가심사(전북도)	: 2018.  1.

◦ 하천공사 시행계획 고시 및 공사 발주	: 2018.  2.

6		동면천 하천정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2019

◦ 사 업 비 : 15,480백만원(국비 7,740 도비 3,096, 시비 4,644)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km

▸ 제방축조 및 보축, 교량 재가설 등

□ 추 진 실 적

◦ 국비확정 통보(교부결정 4억원)	: 2017. 3.

◦ 원가심사(전북도)	: 2017. 3.

◦ 실시설계 용역 착수	: 2017. 7.

□ 마무리 대책

◦ 실시설계 사전협의(익산청)	: 2018.  2. / 6.

◦ 주민설명회	: 2018.  3.

◦ 설계경제성 검토	: 2018.  4.

◦ 건설기술심의(전북도) 및 총사업비 협의(익산청)	: 2018. 10.

◦ 설계적정성 검토(조달청)	: 2018. 10.

◦ 원가심사(전북도) 및 공사 발주	: 2018. 12.

7		소하천 정비사업(오동정천, 대판천)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 망성면 어량리(오동정천), 삼기면 연동리 (대판천)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2018.

◦ 사 업 비 : 5,200백만원(국비 2,600 시비 2,360 기타 160)

◦ 사업내용 : 소하천정비(2개소, L=1.36km)

사업명	사 업 량	사업비(백만원)	사업기간
합 계		5,200
오동정천	소하천정비 L=0.74km	3,600	2015. 1 ~ 2017. 12
대판천	소하천정비 L=1.2km	1,600	2017. 1 ~ 2018. 12

□ 추 진 실 적

◦ 오동정천 소하천정비공사 완료	: 2017. 6.

◦ 대판천 실시설계 용역 착수	: 2017. 2.

◦ 대판천 사전설계검토 및 총사업비 변경 요청(전북도)	: 2017. 9.

□ 마무리 대책

◦ 주민설명회	: 2017. 11.

◦ 원가심사(전북도) 및 설계심의(익산시)	: 2017. 11.

◦ 편입토지 감정평가 및 보상 시행	: 2017. 11.

◦ 공공디자인 심의	: 2017. 12.

◦ 공사 발주	: 2018.  1.

8		만경강 물문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 12필지

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2019

◦ 사 업 비 : 113억원(국비100억, 시비13억)

◦ 사업개요 : 11,719㎡(지하 1층 지상2층)/연면적 1,478㎡)

◦ 시설 현황

▸다목적실, 사무실，카페테리아，생태전시 및 홍보관, 체험관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강신탁지구 하천정비사업에 포함)

□ 추 진 실 적

◦ 물문화관 조성에 따른 MOU 체결               : 2017. 4. 7.

▸익산시，김제시，익산지방국토관리청

□ 마무리 대책

◦ 실시설계 완료(익산지방국토관리청)             : 2017. 11.

◦ 공사발주(익산국토청) 및 토지보상(익산시)       : 2017. 12. ~

◦ 공사 추진(익산지방국토관리청)                          : 2017. 12. ~ 2019. 12.

9		도로조명시설 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2017. 01 ~ 12

◦ 사업예산 : 1,250,680천원

◦ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행불편지역 조명시설 보수  및 설치

◦ 사업내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		10개 사업	1,250,680
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등신규설치 268개소	207,700
	보안등신규설치공사	보안등신규설치261개소	307,440
	영등2동외 2개동 LED가로등교체공사	LED가로등교체 29개소	39,400
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비 90개소	90,000
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 50개소	50,000
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	60,080
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	30,000
	가로등관리번호표찰설치	가로등관리번호표찰부착	85,560
	익산대로 가로등 LED교체공사	가로등LED교체 90개소	100,000	1차추경
	원대사거리~공설운동장앞 가로등LED교체공사	가로등LED교체 90개소	100,000	〃
	하나로전자랜드사거리주변 노후가로등보수공사	노후가로등정비55개소	30,000	2차추경
	상공회의소~모현사거리가로등LED교체공사	가로등LED교체 29개소	25,000	〃
	마동솜리예술회관부근가로등교체공사	가로등철거및설치26개소	80,000	〃
	안전점검부적합가로등보수공사	부적합가로등시설보수	23,000	〃

□ 추 진 실 적

◦ 보안등이설 및 신규설치 213개소(243,176천원)	: 2017. 01. ~ 09.

◦ 가로등정비 및 유지보수 6개사업(354,637천원)	: 2017. 01. ~ 09.

□ 마무리 대책

◦ 생활환경개선사업 보안등 설치공사 추진	: 2017. 10 ~ 12

◦ 도심지역 가로등 유지보수(4차) 외 4개사업 추진	: 2017. 10 ~ 12