전국체전담당관

□	목표 및 중점추진과제	…	3
□	일 반 현 황	…	4
□	2017 주 요 성 과	…	5
□	2018 주 요 업 무	…	6

비전 및 중점추진방향

성숙한 시민의식

완벽한 대회준비

대회분위기 조성

체전과 문화․예술이 어우러지는 문화체전 승화

• 성숙된 시민의식

• 깨끗한 환경조성

• 안전한 선진교통

• 경기시설 완벽준비

• 체계적인 운영지원

• 기반편의시설 확충

• 자발적 시민참여

• 문화행사와 연계

• 적극적 체전 홍보

• 시민이 모두 함께 준비하고 참여하는	『화합체전』

• 백제문화유산과 스포츠가 어우러지는             『문화체전』

• 기존시설 활용으로 지역발전 견인하는           『경제체전』

• 선수·관람객 및 시민 안전과 편의를 지키는	『안전체전』

일   반   현   황

□ 기       구

							전국체전담당관
체 전 기 획								체 전 운 영						체 전 시 설

□ 정 ․ 현 원

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	12	1	3	5	3
현 원	12	1	3	5	1	2
증 감					△2	2

□ 주 요 업 무

◦ 체전기획 : 전국체전(장애인) 기본 및 세부계획 수립, 대․내외 업무협력,

전국체전 운영위원회 구성 운영, 양대 체전 상황실 구성․운영 지원

◦ 체전운영 : 전국체전(장애인) 기본 및 세부계획 실행, 개․폐회식 운영,

전국체전 홍보 및 문화축제 지원, 시민서포터즈 운영,

성화봉송 지원

◦ 체전시설 : 종합운동장 및 종목별 경기장 개․보수, 경기장 공․승인,

경기장 시설점검 및 안전관리, 장애인 편의시설 확충

2017 주 요 성 과

□ 성      과

◦ 2018년 성공적인 체전준비를 위한 기반 구축

▸2018 전국체전 및 전국장애인체전 종합운동장 개선공사 착공
▸2018 전국체전 및 전국장애인체전 종합상황실 구성
▸2018 전국체전 및 전국장애인체전 기본계획 수립 및 배부
▸2018 전국체전 D-365기념행사 실시
▸대한육상연맹 1차 공인 완료 (육상트랙 아스콘 포장 등)
▸대한체육회 종합운동장 1차 사전점검 완료 (본부석 및 주요시설)
▸대한체육회 2018 전국(장애인)체전 사전 준비상황 점검 보고회 실시
▸익산 종합운동장 개선공사 추진(공정율 65%)

◦ 공공체육시설 공모사업 선정 및 경기장 개선공사 국비확보

▸종합운동장 및 보조경기장 우레탄 교체 사업(공모)

∙사업비 : 1,864백만원(국비 932, 시비 932)

▸실내체육관 시설개선사업

∙사업비 :   500백만원(도 특별조정교부금)

◦ 전국체전 시민서포터즈 구성․운영

▸인원 : 2,018명(남1,148, 여870)

▸운영 : 각종 체육, 문화행사시 체전 홍보 18회 1,000여명

◦ 전국(장애인)체전 익산시 운영위원회 구성

▸2018년 양대체전 익산시 운영위원회 구성 : 77명 <위원장 : 시장(당연직)>

∙고    문 : 시의회의장, 국회의원, 도의원, 대학총장 등

∙부위원장 : 부시장, 교육장, 경찰서장, 소방서장, 체육회 부회장 등

∙위    원 : 기관단체, 언론, 경제·의료·문화예술대표, 체육회 이사·감사 등

▸2018년 양대체전 익산시 운영위원회 창립총회 개최

◦ 전국 5대체전 지역경제 파급효과 연구 용역

▸생산유발액 1,591억원 ▸부가가치유발액 655억원  ▸고용유발인원 2,617명

∙전국체전․전국장애인체전(2018.10.) ∙전국소년체전․전국장애학생체전(2019. 05.)

∙전국생활체육대축전   (2020.06.)

		성공적인 전국(장애인)체전을 위한 기반구축
		전국(장애인)체전 문화행사 추진
		전국(장애인)체전 대회 운영
		전국(장애인)체전 홍보
		전국(장애인)체전 시민서포터즈 운영
		전국체전 숙박시설 확충
		전국체전 개․폐회식 주차장 확보
		익산 종합운동장 개선공사
		전국(장애인)체전 종목별 경기장 개선 공사
		익산 종합운동장 진입로 정비 공사

2 0 18  주 요 업 무

1		성공적인 전국(장애인)체전을 위한 기반구축

□ 대 회 개 요

◦ 2018년 제99회 전국체육대회       :  2018. 10. 12 ~ 10. 18.(7일간)

▸참가인원 - 30,000여명(선수 20,000명, 임원 10,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 47개 종목 (익산시 14개 종목/개․폐회식)

◦ 2018년 제38회 전국장애인체육대회 :  2018. 10. 25 ~ 10. 29.(5일간)

▸참가인원 - 7,000여명(선수 5,000명, 임원 및 보호자 2,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 26개 종목 (익산시 8개 종목/개․폐회식)

□ 추 진 계 획

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 종합상황실 운영       : 2018. 01. ~ 10.

◦ 양대체전의 날(매월 12일) 운영(읍면동, 종합행정담당부서)  : 2018. 01. ~ 10.

◦ 전국체전 읍·면·동 홍보대사 위촉                          : 2018. 02.

◦ 대한체육회 전국체전 및 전국장애인체전 사전점검 보고회   : 2018. 03.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 익산시 운영위원회 회의 개최  : 2018. 06.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 성공개최를 위한 회의 개최

▸전국(장애인)체전 종합상황실 운영반 추진계획 보고회 - 2018. 01.~09.

▸전국(장애인)체전 유관기관 업무협의 회의        - 2018. 03.~09.

▸전국체전 D-100, D-30 부서별 준비상황 보고회    - 2018. 07.~09.

□ 기 대 효 과

◦ 2018년 전국(장애인)체전의 성공을 위한 빈틈없는 사전 준비로 완벽한

성공개최 기반 마련

2		전국(장애인)체전 문화행사 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2018. 10.

◦ 사 업 비 : 650백만원(도 325, 시 325)

▸2018년 전국체육대회 문화행사 추진  : 600백만원(도 300, 시 300)

▸2018년 전국장애인체육대회 문화행사 추진  :   50백만원(도  25, 시  25)

◦ 사업내용

▸2018 전국체육대회 관람객 및 체전참가자, 시민을 만족시킬 익산만의 축제 구성

▸우리 시만의 문화 정체성이 담긴 참여형 기획 문화 공연으로 익산 홍보

▸지역축제의 체전 연계로 체전과 문화가 어우러지는 문화행사 기획

□ 추 진 계 획

◦ 문화행사 용역 업체선정 및 계약                         : 2018. 01.

◦ 문화행사 용역 준공                                    : 2018. 03.

◦ 용역 결과 반영 추진                        : 2018. 04. ~ 2018. 10.

□ 기 대 효 과

❍ 전국(장애인)체전 성공을 위한 문화축제 개최로 역사문화컨텐츠 및 시민이 행복한 품격도시 익산 대국민 홍보

3		전국(장애인)체전 대회 운영

□ 대 회 개 요

◦ 2018년 제99회 전국체육대회       :  2018. 10. 12 ~ 10. 18.(7일간)

▸참가인원 - 30,000여명(선수 20,000명, 임원 10,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 47개 종목 (익산시 14개 종목/개․폐회식)

◦ 2018년 제38회 전국장애인체육대회 :  2018. 10. 25 ~ 10. 29.(5일간)

▸참가인원 - 7,000여명(선수 5,000명, 임원 및 보호자 2,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 26개 종목 (익산시 8개 종목/개․폐회식)

□ 추 진 계 획

◦ 육상경기장 공인 용품 및 웨이트 트레이닝 기구 구입 의뢰      : 2018. 01.

▸ 공인용품  142종, 웨이트 트레이닝 기구 21종

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 성화봉송 계획 수립               : 2018. 01.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 개․폐회식 수송버스 임차        : 2018. 02.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 개․폐회식 주차 계획 수립  : 2018. 04. ~ 05.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 경기장 공․승인          : 2018. 05. ~ 08.

◦ 전국소년체전(충주) 및 전국대축전(아산) 참관        : 2018. 05. ~ 06.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 성화봉송 및 안치            : 2018. 10.

◦ 제99회 전국체육대회 개최                 : 2018. 10. 12. ~ 10. 18.

◦ 제38회 전국장애인체육대회 개최           : 2018. 10. 25. ~ 10. 29.

□ 기 대 효 과

◦ 전국체전 공인물품(육상용품) 구비 및 관람객 등 교통이용 편의 제공으로 성공적인 체전 운영

4		전국(장애인)체전 홍보

□ 사 업 개 요

◦ 홍보기간 : 2018. 01. ~ 2018. 10.

◦ 홍보내용 : 전국체전 추진 상황, 각종 체전관련 행사 등

◦ 홍보방법 : 언론, 대중교통 래핑, 이벤트, 홍보물 제작 등

□ 추 진 계 획

◦ 관용차량 전국(장애인)체전 래핑 홍보(승용차 및 승합차)  : 2018. 01.

◦ 전국(장애인)체전 표어 공모전 실시                 : 2018. 01.~02.

◦ 전국(장애인)체전 언론 홍보                        : 2018. 01.~10.

◦ 전국(장애인)체전 SNS 이벤트 실시(분기별)          : 2018. 01.~10.

◦ 전국(장애인)체전 카운터기 설치(읍면동 및 유관기관) : 2018. 02.

◦ 전국(장애인)체전 주 개최도시 LED 전광판 홍보      : 2018. 02.

◦ 비즈링(통화연결음) 활용 홍보 실시                 : 2018. 05.~10.

◦ 전국(장애인)체전 홍보 조형물 설치                  : 2018. 06.

◦ 대중교통 전국(장애인)체전 래핑 홍보               : 2018. 07.~10.

◦ 전국(장애인)체전 청사초롱 거리 조성               : 2018. 09.

◦ 전국(장애인)체전 백서 발간                         : 2018. 10.~12.

□ 기 대 효 과

◦ 시민과 함께 준비하고 참여하는 화합체전 붐 조성으로 성공적인 체전 개최

5		전국(장애인)체전 시민서포터즈 운영

□ 서포터즈 현황

◦ 운영기간 : 2017. 03. ~ 2019. 05.(소년체전 종료 시까지)

◦ 인    원 : 2,018명 (남 1,148명 /여 870명)

◦ 조직구성 : 단장, 부단장, 8개 분과위원

◦ 주요역할

▸전북도 시․군 전국대회 및 우리시 체육, 문화 행사 시 체전 홍보

▸참가 선수단 환영․환송 행사 및 경기 관람 응원 참여

□ 추 진 계 획

◦ 시민서포터즈 분과별 간담회 실시                 : 2018. 01. ~ 09.

◦ 시민서포터즈 활성화 교육 실시                          : 2018. 02.

◦ 양대체전 성공개최 시민서포터즈 분과별 위원장 워크숍   : 2018. 03.

◦ 시민서포터즈 각종 행사 시 양대체전 홍보 활동    : 2018. 03. ~ 10.

◦ 시민서포터즈 양대체전 경기장별 응원             : 2018.  10.

□ 기 대 효 과

◦ 각종 행사와 축제에 참여하여 전국체전 홍보 등 다양한 활동을 통해 전국체전 분위기 확산

6		전국체전 숙박시설 확충

□ 업소현황

◦ 숙박시설

구 분	총 계	숙 박 업				청 소 년 수련시설	농어촌 민박	비 고 (농촌체험 휴양마을)
		소계	관광호텔	여관업	굿스테이
업소수	205	182	2	179	1	1	17	5
객실수	4,593	4,469	78	4,360	31	40	45	39
수용능력	9,622	8,938	156	8,720	62	248	190	246

◦ 숙박 현황 예상 분석(80%가동률)

숙박예상 인원	수용가능 인원 (9,622명 × 80%)	부 족	비 고
8,500명	7,600명	900명

※ 여산 부사관학교 숙소 사용 협의 완료(교육생 숙소 3개동 840명)

□ 추 진 계 획

◦ 전국체전 대비 숙박업소 전수조사 (위생과)         : 2018. 01. ~ 02.

◦ 숙박업소 사업주 전국체전 대비 교육 (위생과)     : 2018. 01. ~ 10.

◦ 컨벤션 호텔 준공 예정 (160실 400명)             : 2018. 08.

□ 기 대 효 과

◦ 전국체전 대회참가자, 선수단, 관람객들의 수요예측을 통하여 최상의

숙박시설 제공

◦ 청결, 위생, 친절서비스 등 사전교육으로 품격도시 익산 이미지 제고

7		전국체전 개․폐회식 주차장 확보

□ 주차 수요(예상)

필요면수	주차장 운영			비 고
	계	종합운동장	임시주차장
4,400	6,340	800	5,540

□ 추 진 계 획

◦ 임시 주차장 확보 추진                          : 2018. 01. ~ 09.

구 분	규 모	산출근거	설치면수	비 고
계			5,540
쓰레기야적장 및 소각장 주변 도로	30,000㎡	15㎡/대	2,000
신재생자원센터 주변도로(양측)	3,200m	6m/대	530
원광고등학교 및 진입도로	6,600㎡	15㎡/대	440
제2공단 내 19호 공원 축구장 및 도로	27,600㎡	15㎡/대	1,840
공설운동장 야구장(흙구장), 팔봉초	10,950㎡	15㎡/대	730

◦ 도로변 임시 주차장 사용 협의(익산경찰서)            : 2018. 02.

◦ 임시주차장(야적장) 예정지 현장 조사                 : 2018. 02.

◦ 원광고, 팔봉초 임시주차장 사용 협의                  : 2018. 02.

◦ 임시주차장(야적장) 진입로 정비 및 사리부설          : 2018. 09.

◦ 임시주차장 유도 표지판 등 운영 편의 물품 확보      : 2018. 09.

□ 기 대 효 과

◦ 효율적인 주차관리로 개·폐회식 주차편의 제공

◦ 체계적인 주차질서 확립으로 주차난 해소와 원활한 차량소통 도모

8		익산 종합운동장 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 익산 종합운동장 개선공사

◦ 위    치 : 익산시 무왕로 1397(익산종합운동장)

◦ 공사기간 : 2017. 3월 ~ 2018. 6월

◦ 공 사 비 : 32,533백만원(국비 10,073, 도비 9,048, 시비 13,412)

◦ 대상시설

구 분	주경기장	실내체육관	보조경기장	비고
연 면 적	13,684㎡	18,978㎡	20,500㎡
준공년도	1991년	1997년	2008년
용 도	관람집회시설	관람집회시설
수용인원	15,000명 (당초18,000명)	5,500명 당초6,000명)

◦ 공사내용 : 주경기장, 실내체육관, 보조경기장 개보수

□ 추 진 계 획

◦ 익산 종합운동장 개선공사 추진    : 2018.1월 현재 공정율 70%

◦ 대한체육회 경기장 2차 준비상황 및 시설 점검      : 2018. 3.

◦ 익산 종합운동장 개선공사 준공                    : 2018. 6.

◦ 대한육상연맹 육상경기장 1종 공인 완료            : 2018. 7.

◦ 익산 종합운동장 사전대회 개최                     : 2018. 7. ~ 9.

□ 기 대 효 과

◦ 2018년 전국(장애인)체전의 개·폐회식장인 종합운동장의 완벽한 시설  개선으로 성공 체전 기여

◦ 체육시설 인프라 구축으로 대규모 체육행사 유치 및 경제체전 도모

9		전국(장애인)체전 종목별 경기장 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 금마축구경기장 외 15개소 개선공사

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 공사기간 : 2018. 01. ~ 2018. 10.

◦ 공 사 비 : 3,561백만원(국비 1,067, 도비 103, 시비 2,391)

◦ 대상시설

(단위:백만원)

종 목	종 별	경기장명	사업비	사업내용
합계			3,561
마라톤	전종별	익산시 일원	202	아스콘포장
경보	전종별	익산시 일원	45	아스콘포장
야구	일반부	익산야구장	30	화장실
소프트볼	전종별	리틀야구장	43	마운드정비
복싱	전종별	마한교육문화회관	50	조명,바닥
복싱	전종별	전북대익산캠퍼스	50	조명,바닥
배드민턴	전종별	익산 원광대체육관	50	조명,바닥
보디빌딩	전종별	솜리문화예술회관	30	조명
축구	남대부	배산축구공원	820	잔디교체
축구	남고/여고	금마축구공원	1,639	잔디교체
배구	여고/여일	남성고 체육관	25	조명
배구	남고부	전북기계공고	25	조명
트라이애슬론	전종별	익산 웅포면 일원	10	바닥정비
에어로빅	전종별	배산실내체육관	280	조명,바닥
론볼	전종목	익산론볼장	262	잔디교체

□ 추 진 계 획

◦ 대한체육회 종목별 경기단체 경기장 사전실사      : 2018. 1. ~ 2.

◦ 종목별 경기장 설계 용역                         : 2018. 1. ~ 3.

◦ 종목별 경기장 공사 착공                         : 2018. 3.

◦ 종목별 경기장 공사 준공                         : 2018. 7.

◦ 종목별 경기장 사전대회 개최                      : 2018. 7. ~ 9.

□ 기 대 효 과

◦ 2018년 전국(장애인)체전 종목별 경기장의 완벽한 시설 개선으로 성공  체전개최 및 지방체육 진흥 기여

10		익산 종합운동장 진입로 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 익산 종합운동장 진입로 정비공사

◦ 위    치 : 익산 종합운동장 주경기장 진입로 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 7월

◦ 공 사 비 : 750백만원(국비 171, 도비 251, 시비 328)

◦ 사업내용

▸전국체전경기장 진입부 개선(L=230m, B=18m, 2개소) 및 주변환경 개선

–노후 보도 철거 후 보행로 신설 및 자전거도로, 산책로 조성, 경관조명 설치

–진입로변 지장시설 가림용 홍보판 설치 및 기존 수목주변 그늘막 쉼터조성 등

▸전국체전 경기장 내 각종 편의시설 조성 및 종합 안내판 설치 등

□ 추 진 계 획

◦ 주경기장 진입부 정비공사 설계용역             : 2018. 01. ~ 02.

◦ 주경기장 진입부 정비공사 착공                 : 2018. 03.

◦ 주경기장 진입부 정비공사 준공                 : 2018. 07.

◦ 전국(장애인)체전  성공 개최                     : 2018. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 전국체전 주경기장 진입로 시설개선을 통하여 깨끗하고 안전한 종합

운동장 조성으로 원활한 경기운영 및 성공 체전 개최 도모