국가식품클러스터담당관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 주요성과
□	2018 주 요 업 무 계 획

목표 및 중점추진과제

	목 표
글로벌 식품시장의 新중심 육성

		전 략 목 표
◦ ◦	국가식품클러스터 운영 본격화 국내․외 유수기업 및 연구소 유치

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	기업활동에 적합한 인프라 구축 및 국가식품클러스터 기반시설확충 3대 R&D 및 기업지원시설 운영 정상화로 푸드폴리스 경쟁력 강화 기업지원체계 구축․운영으로 기업 투자유치 가속화

일   반   현   황

□ 기          구

					국가식품클러스터담당관
	국가식품						유치홍보				지원협력

□ 정  ․  현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	3	4	5	-
현 원	12	1	3	3	3	2
증 감	△1	0	0	△1	△2	2

□ 사  무  분  장

◦ 국가식품	:	국가식품클러스터 기획조정, 신규사업 발굴 및 국가예산 대내·외 산학연 교류 협력사업 추진 국가식품클러스터지원센터․기업지원시설 운영 관리 외국인투자지역 관리․운영
◦ 유치홍보	:	국내외 식품기업 및 연구소 투자 유치, 기술지원 홈페이지 관리, 국내․외 홍보전략 수립 홍보관 운영, 각종 홍보물 제작 및 홍보
◦ 지원협력	:	식품전문산업단지 조성지원, 산업단지 기반시설 확충 소스산업화센터 건립, 기업지원시설 장비구축 배후복합도시 및 2단계 조성

2017 주요성과

□ 성      과

◦ 국가식품클러스터 1단계 산업단지 준공           : ‘17. 12.

◦ 소스산업화센터 건립 사업 추진

▸소스산업화센터 개념설계 용역 추진	: ‘17. 2.

▸소스산업화센터 기본 및 실시설계용역 발주	: ‘17. 9.

◦ 국가식품클러스터 기반시설 확충

▸진입도로 공사 추진 (공정률 44.6%)	:  ‘15. 2. ~

▸공공폐수처리시설 건설공사 1단계 준공	:  ‘17. 12.

▸왕궁배수지 건설공사 준공                              :  ‘17. 12.

◦ 투자유치 및 교류협력 활동 전개

▸분양계약체결(26건) : 에이디오인프라코어(14,876㎡), 빌리엔젤(6,505㎡) 등 26건

▸MOU체결(25건) : 풀무원(2.11.), 그린스토어(12.18.) 등 25건

▸투자유치관 운영(12회) : 캐나다 SIAL 2017(5월/캐나다), 서울국제식품산업대전(5월/국내), 국제식품소재전(9월/국내), 유럽국제식품소재전(11월/독일) 등 12건

▸투자설명회 개최(12회) : 지역순회투자설명회(서울‧경기, 광주‧전남, 제주, 대구‧경북 등), 해외투자설명회(캐나다, 일본 등)

▸국가식품클러스터 입주기업 합동워크숍 개최(42개사)       : ‘17. 12. 6.

▸국가식품클러스터 자문단 회의(3회)                  : ‘17.  4., 7., 9.

◦ 기업 및 기술지원 사업 추진                         : ‘17. 2. ~

▸기업맞춤형컨설팅(26건), 애로기술해결을 위한 공동과제 수행(39건), 장비활용 검사분석(1,500여건), 시제품 생산지원(77건)

▸맞춤형 인력양성, 판로개척 및 원료조달 기반마련

▸식품벤처센터 입주 활성화(32개사) 및 푸드폴리스 창업지원 Lab 구축운영(4개팀)

▸국가식품클러스터지원센터 GMP(우수건강기능식품제조 및 품질관리기준) 인증 취득                                                              : ‘17. 9. 27.

◦ 산학연 네트워크 활성화                              : ‘17. 3. ~

▸산학연 협의체 구성 ‧ 운영

▸식품전문학회 및 세미나 유치(3회)

: 한국식품과학회 관능검사 분과 심포지엄(6월), 한국식품영양과학회    산업심포지엄(9월), 한국포장학회 학술대회(10월)

▸제7회 식품클러스터 국제컨퍼런스 개최(익산, 11. 15.)

▸식품산업과 4차 산업혁명 국제 심포지엄 개최(12. 6.)

□ 반      성

◦ 선도 기업 투자유치 저조

▸수도권 규제완화 및 산업경제 집중으로 대기업의 지방(충청권 이남) 투자 기피

▸산업단지 활성화를 위해 연관기업 동반 이전 효과가 큰 대기업 유치 필수

⇒ 중앙정부(농식품부) 대기업 유치활동 및 유인정책 발굴 지속 건의 및 전북도,

익산시, 지원센터, 지역 국회의원들과 공조하여 대기업 유치에 최선의 노력을

다하겠음

2018주요업무계획

		국가식품클러스터 국가식품클러스터 국가식품클러스터 국가식품클러스터 국가식품클러스터 국가식품클러스터	1단계 식품전문산업단지 조성 기반시설 확충 정부기업지원시설 운영 배후복합도시 조성 투자유치 및 교류협력 외국인투자지역 관리
	□	소스산업화센터 건립

1		국가식품클러스터 1단계 식품전문산업단지 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2018년(10년)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 흥암리, 광암리, 동촌리 및 왕궁리 일원

◦ 총사업비 : 3,119억원(용지비 800, 공사비 2,119, 기타 200)

◦ 사업내용 : 국가식품전문산업단지 조성 232만㎡(70만평)

▸ 산업시설용지(제조,연구,물류) 460천평, 상업용지 8천평, 주거용지 23천평

▸ 지원시설용지 27천평, 기반시설용지(도로,공원,폐수처리장 등) 182천평

◦ 사업시행자 : LH공사

□ 추 진 계 획

◦ 식품전문산업단지 1단계 관리공사(LH공사) 추진      : ‘18. 1. ~ 12.

◦ 식품전문산업단지 1단계 준공인가(국토부)            : ‘18. 2.

◦ 기반시설(도로, 공원, 공공폐수처리시설 등) 인계·인수 : ‘18. 2. ~ 6.

※ 국가식품클러스터 2단계는 1단계 분양률이 50% 이상일 경우 추진

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 식품전문산업단지 조성으로 『글로벌 식품 시장의 新중심』육성 및 지역경제 활성화 도모

2		국가식품클러스터 기반시설 확충

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2019년(7년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 일원

◦ 총사업비 : 976억원(국비 692, 지방비 84, 민자 200)

(단위:억원)

구 분	시설규모	사 업 비				예산 확보액			관리부처 (사업시행자)
		합계	국비	지방비	민자	‘17년까지	‘18년	‘19년이후
합 계		976	692	84	200	국 비 475 지방비 84 민 자 157	국 비 136 지방비 0 민 자 0	국 비 81 지방비 0 민 자 43
진입도로	L=4.1km, 4~6차선	432	432	-	-	국 비 296	국 비 136		국토교통부 (익산국토청)
용수공급 시 설	배수지 Q=8.8천㎥/일	84	-	84	-	지방비 84			익 산 시 (준공)
	송수관로 D=600㎜, L=10.5km	110	36	-	74	국 비 36 수 공 74			수자원공사 (준공)
공공폐수 처리시설	Q=10천㎥/일	350	224	-	126	국 비 143 LH공사 83	국 비 0 LH공사 0	국 비 81 LH공사 43	LH공사

□ 추 진 계 획

◦ 공공폐수처리시설 인계·인수(LH공사→익산시)            : ‘18. 6.

◦ 국가식품클러스터 진입도로 확장공사 준공(익산국토청)    : ‘19. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 입주기업 활동에 유리한 기본 인프라를 조기 구축하여 기업 투자유치 활성화

3		국가식품클러스터 정부기업지원시설 운영

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년

◦ 총사업비 : 1,754억원(국비 1,285, 지방비 303, 민자 166)

◦ 사업내용

▸H/W 6개사업 : 품질안전센터, 기능성평가지원센터, 패키징센터, 벤처센터, 파일럿플랜트, 지원센터

▸S/W 10개사업 : 식품상품화 R&BD지원, 기능성식품개발․육성 및 인력양성 등

▸장비구축 : 581종 410억원 구축

- ‘17년까지 : 468종 282.77억원  구축(계약) 완료

- ‘18년 : 29종 19.71억원, ‘19년 이후 : 84종 107.52억원

□ 추 진 계 획

◦ 기업지원시설 장비 구축 및 운영	: ‘18. 1. ~ 12.

▸기업니즈에 부합하는 검사․분석, 공동연구, 시제품 생산 등을 수행

할 수 있는 기술지원 장비구축 및 운영

◦ 제품기술 지원 사업 추진	: ‘18. 1. ~ 12..

▸기업 니즈 맞춤형 공동연구 수행, 전문가를 활용한 애로기술 컨설팅(Haccp, GMP 등) 지원, 해외기술 활용 지원, 검사분석 및 시제품 생산 지원

□ 기 대 효 과

◦ 6개 정부기업 지원시설 구축 완료, S/W사업 운영 확대, 기술지원 장비구축을 통한 국가식품클러스터 글로벌 경쟁력 강화 도모

4		국가식품클러스터 배후복합도시 조성

□ 용 역 개 요

◦ 용 역 명 : 국가식품클러스터 식품문화도시 기본계획

◦ 용역기간 : 2018. 3. ~ 12.

◦ 용 역 비 : 200백만원

◦ 주요내용 : 사업개발 규모 및 위치 검토, 주요 H/W시설 계획 및 운영 방안, 사업타당성 검토, 기대효과, 국비확보 사업 발굴 등

□ 추 진 계 획

◦ 국가식품클러스터 식품문화도시 기본계획 용역       : ‘18. 3. ~ 12.

▸ 실질적 수용인구, 면적, 위치 등에 대한 종합적인 재검토

◦ 사업자 선정 및 행정절차(개발계획 등)               : ‘19. 1. ~ 12.

◦ 토지보상                                          : ‘19. ~ ’20.

◦ 공사추진                                          : ‘21. ~ ’23.

※ 배후복합도시 조성 이전 대책으로 산업단지 내 공동주택 및 단독주택 활용(752세대, 2,200명)

□ 기 대 효 과

◦ 친환경 문화ㆍ관광ㆍ레저 기능이 융복합된 선진국형 주거타운 조성으로 글로벌 식품문화도시 조성

5		국가식품클러스터 투자유치 및 교류협력

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 3,800백만원(국비 1,900, 도비 570, 시비 1,330)

◦ 사업내용

▸ 국내‧외 식품기업 투자유치 활동, 국가식품클러스터 종합홍보

▸ 산학연 R&D네트워크 활성화, 해외클러스터 교류협력 활동

□ 추 진 계 획

◦ 국내외 투자유치 활동                               : ‘18. 1. ~ 12.

▸ 국내·외 식품기업 방문 및 조성지 초청 상담

▸ 유관기관을 통한 투자설명회, 순회형 투자설명회, 해외 투자설명회 개최

▸ 국내외 투자유치 전문위원 및 협력기관 운영

◦ 국가식품클러스터 종합 홍보                         : ‘18. 1. ~ 12.

▸방송(영상) 홍보, 초청 및 방문홍보, 온‧오프 매체 홍보 등

◦ 산학연 네트워크 활성화                            : ‘18. 1. ~ 12.

▸ 산학연 협의체 운영으로 R&D 네트워크 활성화

▸ 식품 전문 기술지원 학술대회 및 세미나 개최(4회)

▸ 제2회 농식품 4차 산업혁명 국제심포지엄 개최    : ‘18. 7.

▸ 국가식품클러스터 제8회 국제컨퍼런스 개최         : ‘18. 11.

◦ 국가식품클러스터 자문단 운영(분기1회)               : ‘18. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국내외 식품기업에 대한 국가식품클러스터 직접적 투자유치 효과 증대

6		국가식품클러스터 외국인투자지역 관리

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년(3년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내

◦ 사 업 비 : 17,947백만원(국비 10,768, 도비 2,154, 시비 5,025)

◦ 규    모 : 116,000㎡(35천평)

* 추후 입주수요 등을 고려하여 확장 예정

◦ 운    영 : 산업통상자원부, 전라북도 및 익산시가 부지를 공동 매입하여 외국기업에 임대

◦ 관리위탁 : 한국산업단지공단

□ 추 진 계 획

◦ 외국인투자기업 임대계약 체결 후 토지대금 집행       : ‘18.  1. ~

□ 기 대 효 과

◦ 해외 식품기업의 투자기반 마련을 통한 외국인 투자유치 촉진과 글로벌 식품기업 및 연구소의 투자유치 활성화

7		소스산업화센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(I21)

◦ 총사업비 : 102억원(국비 79, 도비 3, 시비 20)

▸ 설계비 2, 건축비 26, 장비비 38, 관리․운영비 26, 용지비 10

◦ 규    모 : 부지 6,537.6㎡(1,977평), 건축 724㎡(219평)

◦ 시설내역 : 전처리실, 계량실, 쿠킹실, 포장공급실, 충전실, 포장실, 보관실 등

◦ 주요기능

▸ 소스산업 정보센터(레시피, 수출 및 산업정보 등) 구축

▸ 중소식품기업 애로기술 해소 지원(R&BD 네트워킹)

▸ 주문자 수요 시제품 생산지원(ODM*방식)

* ODM(Original Development Manufacturing) : 주문자 요구 기술 개발․생산

□ 추 진 계 획

◦ 소스산업화센터 기본 및 실시설계용역 준공	: ‘18.  4.

◦ 소스산업화센터 건립공사 착공	: ‘18.  5.

◦ 소스산업화센터 건립공사 준공 및 기계장비 구축         : ‘19.  5.

◦ 소스산업화센터 운영	: ‘19.

□ 기 대 효 과

◦ 세계 소스시장은 지속 성장 중으로 국내 소스기업의 신규시장 개척에 체계적으로 지원할 수 있는 기반 마련