건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 주요성과
□	2018 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충 환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공 장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여 도로확포장으로지역간소통원활및통행불편해소 생태하천정비로생활환경개선및주민편익도모 조명시설설치로보행환경개선및야간통행불편해소

일  반  현  황

□ 기       구

					건 설 과
건설행정				도로시설			하천시설					하천관리					가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	22		1	5	11	3	2
현 원	22		1	7	9	0	5
증 감				2	△2	△3	3

□ 사 무 분 장

◦건설행정 : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반

◦도로시설 : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업관련

협의  시·군도, 농어촌도로 확·포장사업 추진

◦하천시설 : 하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦하천관리 : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과,

생태하천관리

◦가로등관리: 가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	153.779	169.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	27.169	75.034	27%

□ 하 천 점 용 허 가  현황(2017년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	답	전	대지	계	답	전	대지
613	438	110	65	334,069	257,490	64,373	12,206

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
28,041등	18,724등	9,317등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 3대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2017 주 요 성 과

□ 성      과

◦ 건설공사 편입용지 협의보상으로 공익사업 추진에 기여

‣  보상계획 사업지구 51개노선 2,854필지 766,950㎡

‣  보상실적: 51개노선 2,043필지 615,982㎡

◦ 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반

구축으로 주민 편익 증대

‣  오산 북영선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.20㎞, B=8.0m

- 공사준공 : 2017. 08. 14.

‣  용동 삼정~두무간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.21㎞, B=8.0m

- 공사추진 : 공정율 60%

‣  춘포 학연~익산천제방간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.74㎞, B=8.0m

- 공사준공 : 2017. 11. 17.

◦ 평화육교를 재가설하여 KTX호남고속철도의 안전한 교통망 구축

‣ 평화육교 재가설 실시설계 용역 완료	: 2017.  3. 31

‣ 평화육교 재가설 공사 발주	: 2017.  4. 14

‣ 평화육교 재가설 공사 착공	: 2017.  7. 18

※ 현재 대체우회도로 개설 중

‣ 편입토지 보상계획 열람공고	: 2017.  9. 25.

‣ 감정평가 실시	: 2017. 11 ~ 12

‣ 편입토지 및 지장물 보상협의 요청공문 발송 : 2017. 12. 29

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천 정비로        재해예방 및 시민 친수공간 조성

‣  왕궁천 하천환경정비사업

-2017년 실시설계용역완료 및 토지보상 진행 중

- 2018년 장기계속공사 발주 예정

‣  동면천 하천환경정비사업

-실시설계용역 중 (하천정비 L=9.25km)

‣  소하천 정비사업

- 외산천 : 준공완료 (하천정비 L=0.62km)

- 오동정천 : 준공완료 (하천정비 L=0.73km)

-대판천 : 실시설계용역 완료 (하천정비 L=1.2km)

◦ 도로조명설치로 밝은거리 조성하여 여성·노약자 등에게 안전한 보행 도모

‣  노후가로등정비 665개소, 보안등 신규설치 384개소

‣  가로등, 보안등 민원접수 및 처리 5,200건

2018주요업무계획

		공익사업을 위한 용지보상 군도23호선 도로확포장공사 평화육교 재가설 사업 시･군도 및 농어촌도로 확포장 왕궁천 하천환경 정비사업 동면천 하천환경 정비사업 소하천 정비사업(대판천,동산천) 만경강 물문화관 조성사업 보안등 신규설치 사업 노후가로등 정비 사업

1		공익사업을 위한 용지보상

□ 현      황

구분	보상대상			보상실적				미보상 토지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	51	2,854	766,950	51	2,043	615,982	80%	51	811	150,968
도시재생과	26	733	122,910	26	411	61,169	50%	26	322	61,741
건 설 과	21	1,476	488,340	21	1,045	414,123	84%	21	431	74,217
도로공원과	1	41	7,965	1	26	6,163	77%	1	15	1,802
시민안전과	1	31	4,897	1	26	4,838	99%	1	5	59
타 기 관	2	573	142,838	2	535	129,689	91%	2	38	13,149

□ 추 진 계 획

◦ 보상계획 : 51개노선 811필지 – 150,968㎡(20,997백만원)

▸독려반 2개반 4명 편성 운영하여 적극적인 보상업무 추진

▸협의기간 내 미 협의자 개별방문 및 면담으로 집중 독려

▸해당 사업자별 현지(읍․면․동) 출장 보상협의 및 계약체결

▸소액 보상자, 노약자, 장애인 등 현지방문 보상민원 처리

▸원거리거주자(서울,경기등)왕복 우편이용 보상협의계약 대행처리

□ 기 대 효 과

◦ 시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스를 제공

◦ 공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여

2		군도23호선 도로확포장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업규모 : L=3.40km, B=16.5~20.5m (2차로 ⇒ 4차로확장)

◦ 총사업비 : 125억원(공사비 90, 보상비 31, 기타 4)

▸2017년까지 6,220 / 2018년  2,000백만원 / 2019년 이후 4,280

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지, 지장물 협의매수 및 수용재결	: 2018. 1. ~ 12.

▸총 248필지 51,900㎡ 중 152필지 35,860㎡ 협의매수 (69%)

- 사유지 95필지 25,371㎡ / 국･공유지 57필지 10,489㎡

◦ 공사 발주	: 2018. 2월중

◦ 공사 추진	: 2018. 3. ~ 2019. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 삼기 일반산업단지 조성에 따른 함열~산업단지간 교통증가에 대비

◦ 원활한 교통망 구축으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 촉진

3		평화육교 재가설사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2020. 6

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m (4차로 ⇒ 6차로확장)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 시비 190)

◦ 시 행 자 : 한국철도시설공단 호남본부

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 보상 및 수용재결 신청	: 2018. 1. ~ 2018. 3.

◦ 대체우회도로 설치	: 2018. 3. ~ 6.

◦ 육교철거(전면통제 2018. 7. ~ 2019. 12.)	: 2018. 7. ~ 12.

◦ 육교 재가설	: 2019. 1. ~ 12.

◦ 사업 완료	: 2020. 6.

□ 기 대 효 과

◦ 안전등급 D등급인 평화육교 재가설로 대중교통 안전성 확보 및   호남고속철도(KTX) 완전한 정상화 실현

4		시･군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산, 용동, 망성, 금마, 왕궁, 용안면 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2020.

◦ 사업규모 : L= 8.44km, B= 7.0 ~ 20.0m

◦ 총사업비 : 6,210백만원 (15개사업, 본예산 3,880, 이월예산 2,330)

▸ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사	:  493백만원

- L=0.91km, B=7.0m                       (본 300, 명 193)

▸ 용안 창리~법성간 도로확·포장공사	:  730백만원

- L=0.84km, B=8.0m                       (본 530, 명 200)

▸ 국도23호 오산교차로 진입램프 설치공사	:  243백만원

- L=0.29km, B=8.0m                              (명 243)

▸ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사	: 1,182백만원

- L=1.21km, B=8.0m                       (명 905, 사 277)

▸ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사	:  369백만원

- L=0.80km, B=8.0m                        (본 300, 명 69)

▸ 함라 칠성~다은간 도로확.포장공사	:  500백만원

- L=1.00km, B=8.0m                             (본 500)

▸ 망성 군도10호~금지간 도로확·포장공사	:  500백만원

- L=1.20km, B=8.0m                             (본 500)

▸ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사	:  370백만원

- L=0.30km, B=6.0m                             (본 370)

▸ 낭산 석천삼거리 도로구조개선사업	:  150백만원

- 3지 회전교차로 1개소                          (명 150)

▸ 오산 장신~만석간 도로확·포장공사	:  700백만원

- L=1.61km, B=8.0m                        (본 500 명 200)

▸ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사	:   93백만원

- L=0.93km, B=7.0m                              (명 93)

▸ 왕궁 온수~시대간 도로확·포장공사	:  320백만원

- L=3.00km, B=8.0m                              (본 320)

▸ 춘포 토다리~덕동간 도로확·포장공사	:  300백만원

- L=1.00km, B=8.0m                              (본 300)

▸ 어양동 어곳~부평간 도로확·포장공사	:  150백만원

- L=0.80km, B=8.0m                              (본 150)

▸ 군도8호선 잔여(병목)구간 확·포장공사	:  110백만원

- L=0.10km, B=8.0m                             (본 110)

□ 추 진 계 획

◦ 망성 신성~관산간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 01 ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2018. 03 ~ 12.

◦ 용안 창리~법성간 도로 확·포장공사

▸ 설계 재검토 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 02.

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 02 ~ 2018. 06.

▸ 공사 추진	: 2018. 05 ~ 2019. 12

◦ 국도23호 오산교차로 진입램프 설치공사

▸ 공사 추진	: 2018. 01 ~ 2018. 07.

▸ 공사 준공	: 2018. 07.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸ 2, 3차분 공사 추진(배수공, 구조물공 등)	: 2018. 1. ~ 12.

▸ 공사 준공	: 2018. 12

◦ 오산 외용(외검선) 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2018. 01 ~ 2018. 03

▸ 공사 추진	: 2018. 03 ~ 2018. 12

◦ 함라 칠성~다은간 도로 확·포장공사

▸ 설계 재검토 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 04.

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2018. 01 ~ 06.

▸ 공사 추진	: 2018. 05 ~ 2019. 12

◦ 망성 군도10호~금지간 도로 확·포장공사

▸ 설계 재검토 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 03.

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2018. 01 ~ 06.

▸ 공사 추진	: 2018. 04 ~ 2019. 12

◦ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사

▸ 실시설계 용역 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 05.

▸ 용지 보상	: 2018. 05 ~ 07.

▸ 공사 추진	: 2018. 08 ~ 2018. 12

◦ 낭산 석천삼거리 도로 구조개선사업

▸ 공사 추진	: 2018. 01 ~ 2018. 07

◦ 오산 장신~만석간 도로 확·포장공사

▸ 설계 재검토 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 03.

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 01 ~ 05.

▸ 공사 추진	: 2018. 03 ~ 12.

◦ 금마 누동~신촌간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 01 ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2019. 01 ~ 12.

◦ 왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사

▸ 설계 재검토 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 04.

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 05 ~ 10.

▸ 공사 추진	: 2018. 10 ~ 2019. 12.

◦ 춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사

▸ 설계 재검토 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 06.

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 07 ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2019. 01 ~ 2019. 12.

◦ 어양동 어곳~부평간 도로 확·포장공사

▸ 설계용역 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 12.

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019. 01 ~ 06.

▸ 공사 추진	: 2019. 07 ~ 2020. 12.

◦ 군도8호선 잔여(병목)구간 확·포장공사

▸ 실시설계 및 행정절차 이행	: 2018. 01 ~ 03.

▸ 공사 추진	: 2018. 03 ~ 06.

□ 기 대 효 과

◦ 읍․면 농촌지역 도로망 확충으로 원활한 교통통행 및 주민생활

편익 기여

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2018년 예산액	금후 투자
	23개사업	L=24.76km B=8~20m	35,258	7,898	3,880	23,480
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	506	300	559	용지 68%	망성 303 (신선선)
2	국도23호 오산교차로 진입램프설치공사	L=0.29km B=8.0m	333	333			공정율 5%
3	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	1,847			공정율 60%	용동 204 (삼두선)
4	용동 흥왕마을 진입로 도로확.포장	L=0.3km B=6.0m	370		370
5	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	505		906	용지 56%	금마 102 (누부선)
6	오산 외용(외검)선 도로확.포장	L=0.80km B=8.0m	1,000	217	300	483	용지 83%	오산 201 (외검선)
7	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
8	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
9	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	974	474	500		용지 87%	오산 301 (용연선)	군도 1호
10	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
11	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190	500	285	용지 85%	함라 201 (진다선)
12	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180	500	1,192	용지 66%	군도 10호
13	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
16	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
17	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296	320	2,187	용지 57%	군도 21호
18	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127	300	1,793	용지 9%	춘포 103 (신화선)
19	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	230	530	86	설계완료	용안 203 (자석선)
20	삼기 석라선 도로.확포장	L=1.00km B=8.0m	1,400			1,400		삼기 203 (석라선)
21	낭산 석천삼거리 도로구조개선	회전교차로 1개소	150	150				군도 13호	지방도 724호
22	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m	1,900		150	1,750
23	군도8호선 병목구간 도로확.포장	L=0.1km B=8.0m	110		110			군도 8호

5		왕궁천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리~춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 :  2015. ~ 2019.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25km

◦ 총사업비 : 24,720백만원(국비 12,360, 도비 4,944, 시비 7,416)

▸2018년 예산 확보액 – 5,000백만원

◦ 사업내용 : 하천정비 L=9.25km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 추 진 계 획

◦ 기술심의(전북도)	: 2018. 2.

◦ 총사업비 협의(익산청)	: 2018. 3.

◦ 감리용역 발주 및 원가심사(전북도)	: 2018. 4.

◦ 하천공사 시행계획 고시 및 공사 발주	: 2018. 5.

□ 기 대 효 과

◦ 통수 단면이 부족하고 노후 및 미 개수된 하천제방․호안을 체계적으로정비하여 주택 및 농경지 침수 등 하천 재해예방 도모

6		동면천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리~왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 :  2017. ~ 2020.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05km

◦ 총사업비 : 15,480백만원(국비 7,740, 도비 3,096, 시비 4,644)

▸2018년 예산 확보액 – 1,000백만원

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 사전협의(익산청)	: 2018. 02. / 06.

◦ 주민설명회	: 2018. 03.

◦ 설계경제성 검토	: 2018. 04.

◦ 건설기술심의(전북도) 및 총사업비 협의(익산청)	: 2018. 10.

◦ 설계적정성 검토(조달청)	: 2018. 10.

◦ 원가심사(전북도) 및 공사 발주	: 2018. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 개발로 인한 주변지역 피해 방지 및   유역내 안전한 하천관리로 주민의 생명과 재산 보호

7		소하천 정비사업(대판천, 동산천)

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
대판천 소하천정비공사	삼기면 연동리 일원	2017. ~ 2018.	3,057(국 1,528 시 1,529) ▸2018년 : 1,240	소하천정비 L=1.275km
동산천 소하천정비공사	웅포면 맹산리 일원	2018. ~ 2020.	2,700 (국비 1,350 시비 1,350) ▸2018년 : 320	소하천정비 L=1.018km

□ 추 진 계 획

◦ 대판천 원가심사(전북도) 및 설계심의(익산시)	: 2018. 01.

◦ 동산천 실시설계 용역 발주	: 2018. 01.

◦ 대판천 소하천정비공사 시행공고 및 발주	: 2018. 02.

◦ 동산천 도 사전설계검토 의뢰	: 2018. 08.

◦ 동산천 감정평가 완료 및 사정결정	: 2018. 10.

◦ 동산천 원가심사(전북도) 및 설계심의(자체) 의뢰	: 2018. 11.

◦ 동산천 소하천정비공사 시행공고 및 발주	: 2019. 01.

□ 기 대 효 과

◦ 하천유역 정비로 농경지 침수 및 하천재해예방 등 안전한 하천관리

◦ 효율적인 하천이수․치수를 통한 공공복리 증진

8		만경강 물문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 일원

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2019

◦ 사 업 비 : 113억원(국비 100억, 시비 13억 토지매입비)

◦ 사업개요 : 11,569㎡(지하 1층 지상2층)/연면적 1,504㎡)

◦ 시설 현황

▸지하1층 : 기계실, 수장고, 비품실

▸지상1층 : 안내데스크, 문화관람실, 카페테리아, 사무실

▸지상2층 : 물전시관, 어린이체험공간, 북카페 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강신탁지구하천정비사업에 포함)

□ 추 진 계 획

◦ 감정 평가 및 토지보상 추진(익산시)	: ‘18. 01. ~

◦ 공사 추진(익산지방국토관리청)	: ‘18. 02 ~’19. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 만경강에 문화관을 조성하여 만경강과 관련된 역사와 생활상을 전시·소개하고 이용객들에게 편의 제공 및 체험활동 참여확대 유도

9		보안등 신규설치 사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 함열읍외 44개소 보안등 설치공사 외 3개사업

◦ 사업기간 : 2018. 1.～ 10월

◦ 사 업 비 : 280,000천원(시비)

◦ 사업내용  --------------------------- 262개소

▸ 함열읍외 44개소  보안등설치  :  44,500천원

▸ 인화동외 127개소 보안등 설치 : 146,000천원

▸ 성당면외 88개소  보안등 설치 :  89,500천원

□ 추 진 계 획

◦ 보안등 신규설치대상 수요파악	: 2018. 01~02

◦ 보안등 신설지역 현장조사 및 설계	: 2018. 03~08

◦ 보안등 신규설치 공사발주 및 준공	: 2018. 04~10

□ 기 대 효 과

◦ 도로조명 신규설치로 보행자 및 운전자의 야간통행 불편해소

▸골목길, 야간 주민이동이 빈번한 마을 안길등에 보안등을 설치하여          안전사고를 예방하고 보행환경을 개선

10		노후가로등 정비 사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 도심지역 가로등 유지 보수 단가 외 7개사업

◦ 사업기간 : 2018. 1.  ～ 12월

◦ 사 업 비 : 851,640천원(시비)

◦ 사업내용

▸ 도심지역 노후가로등정비 및 읍면동 보안등 보수

▸ 노후점멸기 교체 및 안전점검 부적합 보수

▸ 노후가로등 LED 교체 및 보수

□ 추 진 계 획

◦ 도심지역 가로등 유지보수 단가외 2개사업	: 2018. 01~12

◦ 가로등노후점멸기 교체공사외 2사업	: 2018. 03~08

◦ 도심지역 노후가로등 LED교체공사외 1개사업	: 2018. 02~06

□ 기 대 효 과

◦ 노후도로조명 시설을 보수 보행자 및 운전자의 야간통행 불편해소

▸ 야간 차량 및 보행자 통행이 빈번한 도로변 노후가로등 보수

안전사고를 예방하고 야간조명환경을 개선