하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 주요성과
□	2018 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전

일   반   현   황

□ 기          구

							하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리				지하수			폐수처리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	31	1	9	5	7	9
현 원	31	1	10	10	6	4
증 감			1	5	▵1	▵5

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 오산 문화마을 하수관거 정비사업, 남부2·3, 북부2 하수관거 정비사업, 함열지구 분류식 관거 정비사업, 유천 생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 마을하수처리시설 운영 및 유지관리, 하수중계펌프장 운영 및 유지관리, CSOs 운영 및 유지관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과
◦	폐수처리 :	공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영관리, 산업단지 폐수 유입 승인, 배수설비 신고, 비용부담금 부과징수 등

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2017. 12.	비 고
시설	총인구	천명	300
	하수인구	천명	269
	보급률	%	89.7
하수처리	1일평균하수발생량	톤	115,313
	1일평균하수처리량	톤	113,397
	하수처리율	%	98.3
하수도 사용	개소수	전	38,724
	톤당 평균요금	원	442.39	2016년 기준

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	28	145,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
제3일반산업단지 공공폐수처리시설	1	5,500㎥/일	직영

2017 주 요 성 과

□ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

◦ 천서왕궁지구 하수관거 정비사업 완료

▸ 관거정비 44.0km, 배수설비 815개소

◦ 화정지구 소규모 마을 하수처리장 설치사업 완료

▸ 관거정비 10.4km, 배수설비 264개소, 마을하수처리장 120㎥/일

□ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

◦ 총26개소(139,411㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

◦ 하수처리시설 적정운영 관리를 통한 처리효율 향상 및 수질오염 저감

□ 하수슬러지 처리시설 설치사업 중단에 따른 지방교부세 삭감에 대한 대응

◦ 사업 부적정 추진에 대한 패널티로 지방교부세 삭감 심의

▸ ‘15년 정부합동감사 시 지적금액 112억68백만원

▸ 적극적 논리개발 및 신속한 대응으로 최종 제외

□ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

◦ 하수도 정비 : 45건 4.563㎞, 하수도기계준설 : 6건 3,570㎥

◦ 하수생활민원 처리를 위한 직원 비상근무조 편성운영 : 2,554건

▸ 맨홀 및 하수도 준설 1,278건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차 조정 등 1,384건 실시

2 0 18  주 요 업 무

		남부 2․3, 북부 2 처리분구 하수관거 정비사업 오산문화마을 하수관거 정비사업 유천 생태습지 유지관리 공공하수처리시설 운영관리 하수찌꺼기 감량화 사업 소규모 하수도 관련 주민숙원사업

1		남부2․3, 북부2처리분구 하수관거 정비사업 (인화동, 주현동, 동산동, /신흥동, 영등1동, 신용동)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동 일원

◦ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 30,136백만원(국비 21,095, 도비 904, 시비 8,137)

▸ 2018년 : 11,775백만원(국비 8,242/도비 353/시비 3,180)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=28.0km, 배수설비 3,200가구

□ 그간 추진사항

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	2017. 06. 19.

◦ 인화동 주민설명회 개최	2017. 11 .24.

◦ 동산동 주민설명회 개최	2017. 11 .28.

※ 2017. 12월 현재 용역 공정율 : 60%

□ 추 진 계 획

◦ 환경부 국비재원협의	2018. 01. ~ 2018. 02.

◦ 주민설명회 개최 (인화동, 동산동)	2018. 02. ~ 2018. 03.

◦ 행정절차 이행 (설계심의, 원가심사 등)	2018. 03. ~ 2018. 04.

◦ 실시설계용역 준공	2018. 04.

◦ 공사 발주	2018. 05. ~ 2018. 06.

◦ 공사 착공 및 준공	2018. 07. ~ 2020. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도심지 내 하수관로 정비를 통한 생활환경개선과 만경강수계 수질개선

및 하수종말처리시설의 효율적인 운영 도모

2		오산문화마을 하수관거 정비사업 (오산면 신지리 광지, 옥포, 월포마을)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 오산면 신지리 옥포1·2, 광지, 월포마을 일원

◦ 사 업 량 : 오수관로 5.4km, 배수설비 87가구

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2018.

◦ 사 업 비 : 4,372백만원(국비3,060, 도비131, 시비1,181)

□ 그간 추진사항

◦ 환경부 및 한국환경공단 재원협의 완료	2016. 06. 28.

◦ 전라북도 원가심사 완료	2016. 07. 10.

◦ 시설공사 착공	2017. 09. 15.

※ 2017. 12월 현재 용역 공정율 : 29% (광지마을 오수관로 공사 중)

□ 추 진 계 획

◦ 공사 착공 및 준공	2017. 09. ~ 2018. 09.

◦ 하수도사용개시 및 국비정산 보고	2018. 09. ~ 2018. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 공공하수처리구역 확대로 수질오염을 저감하여 맑은 물 보전에 기여

◦ 농촌마을 하수도 보급 증대에 따른 주거환경 개선

3		유천 생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 시설규모 : 생태습지 A=134,521㎡, 생태하천 0.9km

◦ 사업내용 : 수질관리, 수목 및 잔디관리, 시설물 보강공사 등

◦ 사업기간 : 연 중

◦ 사 업 비 : 250백만원

□ 추 진 계 획

◦ 유천생태습지 조경 유지관리공사 발주	2018. 01.

◦ 유지관리공사 추진	2018. 01  ~ 2018. 12.

◦ 생태하천복원사업 모니터링 용역 추진	2018. 02  ~ 2018. 12.

◦ 주민편익시설 보강 공사시행	2018. 02. ~ 2018. 05.

▸ 체험숲길 조성, 소공연장 기능보강, 파고라, 의자 등 편의시설 증설 등

□ 기 대 효 과

◦ 시민에게 쾌적한 친수공간과 편안한 휴식공간을 제공하여 주민 편익 증진

◦ 지속적인 유지 관리를 통해 어린이들을 위한 생태 체험 학습장으로 활용

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설 : 27개소

시설명	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	익산	북부	함열	금마	분뇨
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	85개소	100,000	30,000	6,000	1,100	150
운영방식	직 영		직영75 위탁10	위탁운영[(주)전북엔비텍BTO, 2008.~2028.]

◦ 2018년 인수예정 : 처리장 1개소, 중계펌프장 5개소

◦ 직영 시설 관리인원 : 4명(전기운영2, 기계운영1, 열관리운영1)

◦ BTO위탁운영비 예산 : 135억원(도비 5.9억원 시비 129.1억원)

□ 추 진 계 획

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 적정 수질관리 준수

▸ 수질분석 : 익산공공처리시설 외 4개소 1일 1회 6개항목

▸ 소규모하수도시설 및 중계펌프장 운영 관리 : 주1~2회 수시점검

◦ BTO 위탁운영 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 : 32,680천원

◦ 공공하수처리시설 법정 기술진단 실시 : 오산문화 외 1개소 21,120천원

◦ 공공하수처리시설 악취 기술진단 실시 : 북부하수 외 3개소 105,462천원

◦ 하수처리시설 기술진단 개선공사 추진 : 여산하수 외 5개소 204,170천원

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 : 익산공공 외 4개소 3,520천원

□ 기 대 효 과

◦ 최적의 하수처리를 통한 새만금수질환경 개선으로 자연환경 보전 기여

5		하수찌꺼기 감량화사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2021.

◦ 사 업 비 : 21,020백만원 (국비 70%, 지방비 30%)

◦ 사업내용 : 개량공사 1식, 증설공사 1식

▸ 개량공사 : 스팀방식 변경, 드럼스크린 교체, 탈취커버, 가스저장탱크 교체 등

▸ 증설공사 : 소화조(5,000㎥/일), 소화가스 활용 발전설비, 탈취시설, 농축시설

□ 추 진 계 획

◦ 기초 현장조사, 주요 공정 설계	2018. 01. ~ 04.

◦ 환경부 기술검토	2018. 05. ~ 06.

◦ 기본 및 실시설계 경제성검토, 설계 자문	2018. 07. ~ 08.

◦ 설치승인 및 인허가	2018. 09.

◦ 환경부 재원협의	2018. 10.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	2018. 10.

◦ 건설공사 발주 및 착공	2018. 11.

◦ 준공	2021.

□ 기 대 효 과

◦ 하수찌꺼기 감량을 통한 처리시설 운영개선 및 처리비 절감

◦ 자원순환형 폐기물관리체계 구축으로 온실가스 감축 등 기후변화에 대응

6		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 비 : 2,731백만원

◦ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2018. 12.

◦ 사업내용

▸ 시민생활에 불편한 하수도 슬러지 준설, 하수관로 연장, 맨홀단차 등 생활의 불편을 주는 민원에 대하여 주민숙원사업 처리

◦ 사업개요	85건 / 2,731백만원

▸ 소규모 주민 숙원 사업                 :    21건 / 2,212백만원

▸ 읍면동 견문보고 사업(현장행정)        :    42건 /   336백만원

▸ 생활환경 개선사업                     :    22건 /   183백만원

□ 추 진 계 획

◦ 사업대상지 현장조사 및 실시설계	2018. 01. ~ 04.

◦ 공사 착공 및 준공	2018. 03. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 주민불편 소규모 하수도 관련 시설물 개선공사로 주민불편 해소

◦ 하수관 내 퇴적토, 슬러지 준설, 하수관로 연결 등 주민숙원사업 추진