2018. 7.

제210회 익산시의회(임시회)

― 2018 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	전국체전담당관

전국체전담당관

□	비전 및 중점 추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 상반기 성과 및 반성
□	2018 주요업무 추진상황

비전 및 중점 추진방향

성숙한 시민의식

완벽한 대회준비

대회분위기 조성

체전과 문화․예술이 어우러지는 문화체전 승화

• 성숙된 시민의식

• 깨끗한 환경조성

• 안전한 선진교통

• 경기시설 완벽준비

• 체계적인 운영지원

• 기반편의시설 확충

• 자발적 시민참여

• 문화행사와 연계

• 적극적 체전 홍보

• 시민이 모두 함께 준비하고 참여하는            『화합체전』

• 백제문화유산과 스포츠가 어우러지는            『문화체전』

• 기존시설 활용으로 지역발전 견인하는          『경제체전』

• 선수·관람객 및 시민 안전과 편의를 지키는        『안전체전』

일   반   현   황

□ 기       구

							전국체전담당관
체 전 기 획								체 전 운 영						체 전 시 설

□ 정 ․ 현 원

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	12	1	3	5	3	-
현 원	12	1	4	4	2	1
증 감	-	-	1	△1	△1	1

□ 사 무 분 장

○ 체전기획 : 전국체전(장애인) 기본 및 세부계획 수립, 대·내외 업무협력,

전국체전 운영위원회 구성 운영, 양대 체전 상황실 구성·운영지원

○ 체전운영 : 전국체전(장애인) 기본 및 세부계획 실행, 개·폐회식 운영,

전국체전 홍보 및 문화축제 지원, 시민서포터즈 운영, 성화봉송 지원

○ 체전시설 : 종합운동장 및 종목별 경기장 개·보수, 경기장 공·승인,

경기장 시설점검 및 안전관리, 장애인 편의시설 확충

2018 예산 집행실적

【 2018. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
전국체전담당관				28,335,873	9,749,226	18,586,647	34.4
	2018년 전국체전 및 전국장애인체전개최			28,310,285	9,739,126	18,571,159	34
		2018년 전국체전 기반시설		25,474,379	9,378,243	16,096,136	36.8
			전국체전시설건립	22,720,379	7,983,613	14,736,766	35.1
			공공체육시설장애인편의시설설치사업	390,000	336,190	53,810	86.2
			공공체육시설 개보수지원 (우 레 탄 교 체)	1,864,000	608,926	1,255,074	32.7
			익산실내체육관 시설개선사업	500,000	449,515	50,485	89.9
		2018년 전국체전 준비		2,579,514	360,383	2,219,131	13.9
			전국체전 기획 및 운영	707,644	229,387	478,257	32.4
			전국체전 대회운영	73,250	792	72,458	1.1
			전국체전 홍보지원	317,000	92,221	224,779	29.1
			전국체전 교통지원	38,950		38,950
			전국체전 주경기장 공승인 지원	758,000	11,883	746,118	1.6
			전국체전 문화행사 추진	600,000	26,100	573,900	4.4
			전국체전 성화봉송 운영지원	10,000		10,000
			전국체전경기장안내표지판,안내소 등 지원	74,670		74,670
		2018 전국장애인체전 준비		256,392	500	255,892	0.2
			전국장애인체전 기획 및 운영	106,955	500	106,455	0.5
			전국장애인체전 대회운영	27,450		27,450
			전국장애인체전 홍보지원	15,000		15,000
			전국장애인체전 교통지원	24,350		24,350
			전국장애인체전 문화행사 추진	50,000		50,000
			전국장애인체전 성화봉송 운영지원	6,000		6,000
			전국장애인체전 경기장 안내표지판, 안내소 등 지원	26,637		26,637
	행정운영경비			25,588	10,100	15,488	39.5
		기본경비		25,588	10,100	15,488	39.5
			기본경비	25,588	10,100	15,488	39.5

2018년 상반기 성과

□ 성      과

◦ 2018 성공적인 체전준비를 위한 기반 구축

▸익산 종합운동장 개선공사 추진(현재 공정률 95%)	:	2017. 03.~
▸전국체전 및 전국장애인체전 성화봉송 계획 수립	:	2018. 1.
▸전국(장애인)체전 개최 현장 소통 협업토론회 및 보고회 개최 (7회)	:	2018. 1.~ 6.
▸전국(장애인)체전 카운터기 설치(29개 읍면동)	:	2018. 2.
▸ 2018 전국체전의 날(매월12일) 선포 및 운영	:	2018. 2.
▸전국(장애인)체전 읍면동 시민 홍보대사 위촉(58명)	:	2018. 2.
▸문화․체육 행사 시 시민 서포터즈 양대체전 홍보	:	2018. 3.~ 6.
▸전국(장애인)체전 성공기원 시민 한마음 콘서트 개최	:	2018. 4.
▸2018 전국(장애인)체전 종합 업무회의 개최(대한체육회)	:	2018. 4.
▸2018 전국체전 세계 한인체육회장단 숙소 및 주 경기장 방문	:	2018. 4.
▸전국체전 육상 1종(마라톤,경보) 공인 검사 (1차)	:	2018. 5.
▸전국체전 육상경기 공인 용품 구입(141종)	:	2018. 6.

◦ 2018 전국(장애인)체전 환경 및 시설개선 국□도비 추가 확보 - 1,135백만원

▸(특별교부세) - 전국체전 대비 시가지 환경정비 사업   1,000백만원

▸(도 특별조정교부금)  - 전국체전 종목별 경기장 시설개선 사업      85백만원

- 전국체전 주 경기장 성화대 설치 사업       50백만원

◦ 2018 전국(장애인)체전 홍보□청결□친절 업무협약

▸(홍보)익산우체국, 전통시장 및 수퍼마켓협동조합, 관내 3개 대형마트

▸(청결)청소대행업체(금강,제이,행복나누미)   ▸(친절)대중교통․숙박․외식 업체

◦ 2018 익산 전국(장애인)체전 표어 선정

▸최우수“천년숨결 익산에서, 하나되는 전국체전”외 우수2, 장려3

◦ 2018 전국(장애인)체전 익산시 운영위원회 2차 회의 개최

▸운영위원회 : 99명 <위원장 : 시장(당연직)>

▸2018년 전국(장애인)체전 북한 팀 초청 건의문 채택 및 제출

- 문체부, 국회의원, 대한체육회, 전라북도 대회 조직위원회

□ 반      성

◦ 전국(장애인)체전 시민 자율참여 및 체전분위기 조성 미흡

▸하반기 문화예술행사 등 개최로 체전분위기 조성 및 참여분위기 확산

2018 주요업무 추진상황

		성공적인 전국(장애인)체전을 위한 기반구축
		전국(장애인)체전 문화행사 추진
		전국(장애인)체전 대회 운영
		전국(장애인)체전 홍보
		전국(장애인)체전 시민서포터즈 운영
		전국체전 숙박시설 확충
		전국체전 개․폐회식 주차장 확보
		익산 종합운동장 개선공사
		전국(장애인)체전 종목별 경기장 개선 공사
		익산 종합운동장 진입로 정비 공사

1		성공적인 전국(장애인)체전을 위한 기반 구축

□ 대 회 개 요

◦ 2018년 제99회 전국체육대회       :  2018. 10. 12 ~ 10. 18.(7일간)

▸참가인원 - 30,000여명(선수 20,000명, 임원 10,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 47개 종목 (익산시 12개 종목/개․폐회식)

◦ 2018년 제38회 전국장애인체육대회 :  2018. 10. 25 ~ 10. 29.(5일간)

▸참가인원 - 7,000여명(선수 5,000명, 임원 및 보호자 2,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 26개 종목 (익산시 6개 종목/개․폐회식)

□ 상반기 추진실적

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 종합상황실 운영         : 2018. 1.~ 6.

◦ 전국체전의 날(매월 12일) 운영                      : 2018. 3.~ 5.

▸전국체전 읍면동 시민홍보대사(2018. 2. 22.) : 58명

▸161개소 2,683여명(읍면동 시민홍보대사, 통리장, 주민자치위원, 공무원 등)

◦ 전국(장애인)체전 종합업무회의 개최(대한체육회)       : 2018  4.

◦ 전국체전 세계 한인체육회장단 숙소 및 주 경기장 방문    : 2018. 4.

◦ 전국(장애인)체전 익산시 운영위원회 2차 회의 개최    : 2018. 5.

◦ 전국(장애인)체전 성공개최를 위한 회의 개최          : 2018. 1.~ 6.

▸전국(장애인)체전 준비상황 보고 및 토론회 개최 (도 체전준비단) - 4회

▸전국(장애인)체전 준비상황 보고 및 토론회 개최 (시)  - 3회

□ 하반기 추진계획

◦ 전국체전의 날 운영(읍면동, 종합행정담당부서 등)     : 2018. 6.~10.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 종합상황실 운영         : 2018. 7.~10.

◦ 전국(장애인)체전 성공개최를 위한 회의 등 개최         : 2018. 7.~ 9.

▸전국(장애인)체전 부서별 준비상황 보고 및 토론회

▸전국(장애인)체전 유관기관(경찰서,교육지원청,소방서)업무협의

2		전국(장애인)체전 문화행사 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 03. ~ 2018. 10.

◦ 사 업 비 : 650,000천원(도 325, 시 325)

▸2018년 전국체육대회   : 600,000천원(도 300, 시 300)

▸2018년 전국장애인체육대회  :   50,000천원(도  25, 시  25)

◦ 사업내용

▸양대체전 기간 내방객에게 문화예술의 도시 익산 브랜드가치 홍보

▸기존 문화행사 연계를 통해 시민과 함께 만들어가는 문화체전 추진

□ 상반기 추진실적

◦ 문화예술행사 용역 및 준공                          : 2018. 2.~ 4.

▸원광대학교 산학협력단 (용역기간  :  2018. 2. 2.~ 4. 2.)

◦ 문화예술행사 관련부서 및 예술단체 간담회 개최      : 2018. 4.

▸용역결과 반영 및 행사 주최(총괄부서), 주관(추진단체) 등 협의

- 주최(시) : 문화관광과 / 주관(예술) : (재)익산문화재단

◦ 제18회 익산문화포럼『공감』발제 및 토론 (재)익산문화재단    : 2018. 4.

◦ 전국(장애인)체전 성공기원 시민 한마음 콘서트 개최   : 2018. 4.

◦ 제18차 풀뿌리 문화정책(문화체전의 방향 및 계획)발제 및 토론 ((재)전라북도문화관광재단)  : 2018. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 예술문화대제전 위원회 구성 및 세부추진계획 수립(문화관광과)  : 2018. 6.~ 7.

◦ 전국(장애인)체전 문화예술행사 추진(문화관광과)      : 2018. 7.~10.

▸무왕행차 퍼레이드, 프린지페스티벌 및 전야제 등

◦ 주 경기장 진입로 아트 깃발전 개최                  : 2018. 10.

◦ 주 경기장 내 본부석 진입로(1층 복도) 그림 전시전 개최   : 2018. 10.

3		전국(장애인)체전 대회 운영

□ 대 회 개 요

◦ 2018년 제99회 전국체육대회       :  2018. 10. 12 ~ 10. 18.(7일간)

▸참가인원 - 30,000여명(선수 20,000명, 임원 10,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 47개 종목 (익산시 12개 종목/개․폐회식)

◦ 2018년 제38회 전국장애인체육대회 :  2018. 10. 25 ~ 10. 29.(5일간)

▸참가인원 - 7,000여명(선수 5,000명, 임원 및 보호자 2,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 26개 종목 (익산시 6개 종목/개․폐회식)

□ 상반기 추진실적

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 성화봉송 계획 수립     : 2018. 1.

◦ 전국소년체전 및 전국장애학생체전(충주) 참관        : 2018. 5.

◦ 전국체전 육상 1종(마라톤,경보) 공인 검사(1차)   : 2018. 5.

▸마라톤 구간 : 종합운동장 ⇔ 함라 탑고지 사거리

▸경 보 구 간 : 원팔봉사거리 ⇔ 생활자원 회수센터

◦ 전국체전 육상경기 공인 용품 구입(141종)           : 2018. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 전국체전 육상 1종(트랙,필드) 공인 검사 (최종)    : 2018. 7.

◦ 전국체전 주 경기장 육상 프레대회 개최            : 2018. 7.

▸문화체육관광부장관 기 및 제39회 전국 시․도 대항 육상경기대회

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 성화봉송 및 안치       : 2018. 10.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 개최                   : 2018. 10.

4		전국(장애인)체전 홍보

□ 사 업 개 요

◦ 홍보기간 : 2018. 01. ~ 2018. 10.

◦ 홍보내용 : 전국체전 추진 상황, 각종 체전관련 행사 등

◦ 홍보방법 : 언론, 대중교통 래핑, 이벤트, 홍보물 제작 등

□ 상반기 추진실적

◦ 관용차량 전국(장애인)체전 래핑 홍보(승용차 및 승합차) : 2018. 1.

◦ 전국(장애인)체전 언론 홍보(기획보도, 방송광고)     : 2018. 1.~ 10.

◦ 전국(장애인)체전 SNS 이벤트 실시                 : 2018. 1.~ 10.

◦ 전국(장애인)체전 카운터기 설치(29개 읍면동)        : 2018. 2.

◦ 전국(장애인)체전 표어 공모 선정                   : 2018. 3.

◦ 수도권 LED 전광판 홍보(신사역, 명동사거리)        : 2018. 3.~ 10.

◦ 홈플러스 익산점 외벽 대형 현수막 설치            : 2018. 5.

◦ 관내대형마트, 전통시장, 슈퍼마켓 포스터 및 현수막 배부   : 2018. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 전국(장애인)체전 LED조형물 설치 홍보              : 2018. 7.~10.

◦ 강남고속버스터미널 내 내고향갤러리 백라이트 패널 홍보 : 2018. 6.~10.

◦ 정부 서울청사 LED 전광판 홍보 실시                : 2018. 6.~10.

◦ 행정전화 및 휴대전화 통화연결음 활용 홍보           : 2018. 7.~10.

◦ 전국(장애인)체전 화보집 발간                      : 2018. 7.~10.

◦ 전국(장애인)체전 청사초롱 거리 조성               : 2018. 9.

◦ 2018 전국체전 성공개최 기원 그림그리기 대회 개최  : 2018. 9.

5		전국(장애인)체전 시민 서포터즈 운영

□ 서포터즈 현황

◦ 운영기간 : 2017. 3. ~ 2019. 5.(소년체전 종료 시까지)

◦ 인    원 : 2,018명 (남 1,148명 /여 870명)

◦ 조직구성 : 단장, 부단장, 8개 분과위원

◦ 주요역할

▸전북도 시․군 전국대회 및 우리시 체육, 문화 행사 시 체전 홍보

▸참가 선수단 환영․환송 행사 및 경기관람 응원 참여

□ 상반기 추진실적

◦ 문화․체육 행사시 시민 서포터즈 양대체전 홍보    : 2018. 3.~ 6.

▸사랑의 거북이 마라톤 대회 외 20회 1,000여명

◦ 전국체전의 날(매월 12일) 거리 캠페인 실시         : 2018. 3.~ 6.

▸모현 사거리, 고래등 오거리, 상공회의소 사거리, 전자랜드 사거리 등

◦ 전국체전 홍보 건강강좌 및 작은 음악회 실시       : 2018. 3.~ 6.

▸문화체육센터, 배산체육공원 야외 음악당(매주 수요일)

□ 하반기 추진계획

◦ 문화․체육 행사 시 시민 서포터즈 양대체전 홍보  : 2018.  7.~ 10.

◦ 시민 서포터즈 양대체전 경기장별 응원             : 2018.  10.

6		전국체전 숙박시설 확충

□ 업 소 현 황

◦ 숙박시설

구 분	총 계	숙 박 업				청 소 년 수련시설	농어촌 민박	비 고 (농촌체험 휴양마을)
		소계	관광호텔	여관업	굿스테이
업소수	205	182	2	179	1	1	17	5
객실수	4,593	4,469	78	4,360	31	40	45	39
수용능력	9,622	8,938	156	8,720	62	248	190	246

□ 상반기 추진실적

◦ 전국(장애인)체전 숙박업소 협조 서한문 발송         : 2018. 2.

◦ 전국(장애인)체전 숙박시설 추가 확보 추진           : 2018. 2.

▸전 원광보건대학교 기숙사 - 136실 275명

◦ 숙박업소 현황 파악 전수조사                       : 2018. 2.~3.

◦ 숙박업소 실태조사 실시(138개소)                    : 2018. 4.

◦ 웨스턴라이프호텔 체전 개최 전 준공 관련 업무협의  : 2018. 5.

◦ 전국장애인체전 숙박업소 장애인편익시설 설치 조사  : 2018. 6.

◦ 숙박업소 예약현황 파악

- 전국체전 예약인원 : 5,676명, 장애인체전 예약인원 : 1,280명

□ 하반기 추진계획

◦ 전 원광보건대학 기숙사(해외동포) 시설 보완        : 2018. 7. ~ 9.

◦ 전국장애인체전 선수단 숙박업소 편의시설 설치      : 2018. 8. ~ 9.

7		전국체전 개·폐회식 주차장 확보

□ 사 업 개 요

◦ 개·폐회식 주차편의 제공으로 주차난 해소 및 원활한 차량소통 도모

◦ 주차 수요(예상)

필요면수	주차장 운영			비 고
	계	종합운동장	임시주차장
4,400	5,341	1,100	4,241

□ 상반기 추진실적

◦ 임시 주차장 확보 추진                           : 2018. 1. ~ 6.

구 분	규 모	산출근거	설치면수	비 고
계			4,241
쓰레기야적장 및 소각장 주변 도로	18,465㎡	15㎡/대	1,231
원광고등학교 및 진입도로	6,600㎡	15㎡/대	440
제2공단 내 축구장 및 주변도로	27,600㎡	15㎡/대	1,840
종합운동장 흙 야구장 및 팔봉초	10,950㎡	15㎡/대	730

□ 하반기 추진계획

◦ 임시주차장(제2공단)내 입주 회사 협조 의뢰        : 2018.  7.

◦ 임시주차장 도로 사용 익산 경찰서 업무 협의        : 2018.  8.

◦ 임시주차장(야적장) 진입로 정비 및 사리부설        : 2018.  9.

◦ 임시주차장 유도 표지판 등 운영 편의 물품 확보    : 2018.  9.

8		익산 종합운동장 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 익산 종합운동장 개선공사

◦ 위    치 : 익산시 무왕로 1397(익산 종합운동장)

◦ 공사기간 : 2017.  3. ~ 2018.  8.

◦ 공 사 비 : 32,533백만원(국비 10,073, 도비 9,048, 시비 13,412)

◦ 대상시설

구 분	주 경기장	실내체육관	보조경기장	비고
연 면 적	13,684㎡	18,978㎡	20,500㎡
준공년도	1991년	1997년	2008년
용 도	관람집회시설	관람집회시설
관람석(수용인원)	14,000명(15,000명)	5,000명(6,000명)	900명(야외)

◦ 공사내용 : 주 경기장, 실내체육관, 보조경기장 개보수

□ 상반기 추진실적

◦ 2018. 6월 현재 공정률 95%

▸2018. 2. 26. 도지사 현장 점검

▸2018. 4. 19. 대한체육회 경기장 현장 실사

◦ 익산 종합운동장 개선공사

▸VIP대기실 및 리셉션장 증축     ▸본부석 전면 리모델링

▸관람석 의자 전면 교체           ▸육상트랙 우레탄 전면 교체

▸장애인 전용 관람석 및 엘리베이터 설치 등

▸통신, 소방, 기계설비 마감공사 추진

◦ 실내체육관 개선공사

▸장애인 E/V설치   ▸관람석 의자교체  ▸냉난방기 등 교체

□ 하반기 추진계획

◦ 대한육상연맹 육상경기장 1종 공인 완료           : 2018. 7.

◦ 익산 종합운동장(실내체육관 포함) 개선공사 준공   : 2018. 8.

◦ 익산 종합운동장 사전 대회 개최                   : 2018. 7.~ 9.

9		전국(장애인)체전 종목별 경기장 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 배산 축구경기장 외 13개소 경기장 개선공사

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 공사기간 : 2018. 1. ~ 2018.  8.

◦ 공 사 비 : 3,646백만원 (국비 1,067.5, 도비 102.9, 시비 2,390.6, 교부세 85)

◦ 대상시설

종 목	경기장명	사업내용	비 고
축 구	배산축구장	인조잔디 교체
	금마축구장	인조잔디 교체
마라톤	익산시 일원	아스콘 포장
경 보	익산시 일원	아스콘 포장
야 구	익산야구장	시설정비
소프트볼	리틀야구장	시설정비
보디빌딩	솜리문화예술회관	조명 보강
배 구	남성고체육관	조명 보강
	기계공고	조명 보강
에어로빅	배산실내체육관	조명 보강
철인3종	웅포면일원	접안시설 설치
론 볼	익산론볼장	인조잔디 교체
배드민턴	원광대문화체육관	조명 보강
검 도	익산고체육관	마룻바닥 샌딩

□ 상반기 추진실적

◦ 대한체육회 종목별 경기단체 경기장 사전실사       : 2018.  1.~ 2.

◦ 종목별 경기장 설계 용역                          : 2018.  2.~ 4.

◦ 종목별 경기장 공사 착공                          : 2018.  5.

□ 하반기 추진계획

◦ 종목별 경기장 공사 준공                          : 2018.  6.~ 8.

◦ 종목별 경기장 사전대회 개최                       : 2018.  7.~ 9.

◦ 전국체전 및 전국장애인 체전 성공 개최             : 2018. 10.

10		익산 종합운동장 진입로 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 익산 종합운동장 진입로 정비공사

◦ 위    치 : 익산 종합운동장 주 경기장 진입로 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 8.

◦ 공 사 비 : 750백만원(국비 171, 도비 251, 시비 328)

◦ 사업내용

▸ 주 경기장 진입부 개선(L=230m, B=18m, 2개소) 및 주변환경 개선

- 노후 보도 철거 후 보행로 신설 및 자전거 도로, 산책로 조성, 경관조명 설치

- 진입로변 지장시설 가림용 홍보판 설치

- 기존 수목주변 그늘막 쉼터 조성 등

□ 상반기 추진실적

◦ 주 경기장 진입부 정비공사 설계                   : 2018.  2. ~ 3.

◦ 주 경기장 진입부 정비공사 도 원가심사            : 2018.  3. ~ 4.

◦ 주 경기장 진입부 정비공사 착공                   : 2018.  5.

□ 하반기 추진계획

◦ 주 경기장 진입부 정비공사 준공                   : 2018. 8.

◦ 전국체전 및 전국장애인 체전 성공 개최            : 2018. 10.