녹색환경과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 상반기 성과 및 반성
□	2018 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
쾌적한 환경 녹색청정도시 익산 조성

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	거버넌스를 통한 시민과 함께하는 악취 저감 추진 미세먼지 저감으로 저탄소 녹색청정도시 조성 왕궁권역 생활환경개선으로 주민복지 향상 새만금 수질개선을 위한 적극적인 오염원 제거

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	시민주도의 악취해소 정책 추진 다양한 미세먼지 저감정책을 통한 녹색청정도시 기반 마련 왕궁권역 환경 개선으로 삶의 질 향상 및 친환경적인 생태숲 조성 가축분뇨적정처리 및 생태하천복원으로 새만금 오염원 제거

일  반  현  황

□ 기          구

				녹색환경과
녹색성장			악취해소			기후변화			환경지도			왕궁특수지

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24		1	5	8	10	0
현 원	23		1	8	7	3	4
증 감	△1		0	3	△1	△7	4

□ 사  무  분  장

◦ 녹색성장 : 환경보전 종합계획수립, 환경개선부담금 부과‧징수, 익산둘레길 시설물                      관리, 생태관광지 조성, 야생생물 관리, 수렵면허 관리, 생물 다양성 관 리계약

◦ 악취해소 : 악취배출시설 신고수리 및 지도.점검, 악취배출시설 지정.고시, 악취관리

◦ 기후변화 : 기후변화 적응대책 수립,  탄소 포인트제 운영, 대기오염측 정망   운영, 수질오염 총량관리, 배출업소 허가신고

◦ 환경지도 : 환경오염배출업소 지도점검, 가축분뇨 배출시설 신고 및 지도점검,                   생활소음관리, 비산먼지․특정공사 신고, 자동차 배출가스 지도점검,                   실내공기질 및 석면건축물 관리, 잔류성유기오염물질 관리

◦ 왕궁특수지 : 한센인 간이양로시설 기능보강, 왕궁권역, 마을종합개발사업,                  가축분뇨공공처리시설 운영지원, 생태하천복원사업, 휴·폐업축사 매입

2018 예산집행실적

【 2018. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
녹색환경과				35,269,067	17,684,807	17,584,260	50.1
	대기오염관리			8,827,169	2,084,072	6,743,097	23.6
		대기오염방지		8,356,169	1,877,542	6,478,267	22.4
			천연가스 자동차 확대보급	210,000	70,000	140,000	33.3
			지자체 대기오염측정망설치·운영	151,320	1,320	150,000	0.9
			천연가스차량 연료비 보조금	28,000	163	27,837	0.6
			디지털 환경 표지판관리	23,405	1,800	21,605	7.7
			실시간악취 통합관리시스템운영	209,443	16,116	193,327	7.7
			저녹스버너 보급사업	25,186	0	25,186	0.0
			전기 자동차구매지원(공공부문)	43,000	0	43,000	0.0
			운행경유차 배출가스 저감사업	5,306,778	914,353	4,392,425	17.2
			전기이륜차 보급사업	200,000	12,500	187,500	6.3
			천연가스차량 구비입 보조	192,000	54,000	138,000	28.1
			전기자동차 구매지원(민간부분)	1,200,000	671,780	528,220	56.0
			전기자동차 충전인프라구축(공용)	500,000	0	500,000	0.0
			어린이통학차량의LPG차 전환지원사업	175,000	90,000	85,000	51.4
			석면피해구제사업	15,036	7,978	7,058	53.1
			대기오염측량 운영(지원)	77,001	37,532	39,469	48.7
		기후변화대응활동		471,000	206,530	264,470	43.8
			탄소포인트제가입가구인센티브지급	180,000	0	180,000	0.0
			지자체기후변화적응사업지원	14,000	7,000	7,000	50.0
			기후변화적응대책	277,000	199,530	77,470	72.0
	생태계보호			2,172,203	22,180	2,150,023	1.0
		자연․생태계 보호		2,172,203	22,180	2,150,023	1.0
			생물다양성 관리계약 지원	113,333	0	113,333	0.0
			야생동물피해 예방사업	20,000	20,000	0	100.0
			애향천리 마실길 생태·문화체험	15,000	0	15,000	0.0
			생태관광지조성(금마서동)	1,950,870	0	1,950,870	0.0
			생태계교란생물 퇴치사업	15,000	0	15,000	0.0
			야생동물피해 보상사업	4,000	2,180	1,820	54.5
			전라도 천년 전북 1000리길 선정지원사업	50,000	0	50,000	0.0
			야생동물피해 예방사업(보조)	4,000	0	4,000	0.0
	환경관련종합지원			2,748,683	295,217	2,453,466	10.7
		환경정책		2,748,683	295,217	2,453,466	10.7
			환경개선부담금 관리	49,370	19,051	30,319	38.6
			환경정책지원	1,962,356	211,395	1,750,961	10.8
			옛도랑복원사업	152,077	64,770	87,307	42.6
			먹는물 공동시설 개선	10,000	0	10,000	0.0
			주민건강영향조사	64,000	0	64,000	0.0
			환경기초시설 설치(탄소중립프로그램)	510,880	0	510,880	0.0
	왕궁지역오염원해소			5,624,790	868,836	4,755,954	15.4
		왕궁지역현대화사업		5,624,790	868,836	4,755,954	15.4
			익산천생태하천 복원사업	50,000	541	49,459	1.1
			새만금바이오순환림조성사업	1,652,007	607,615	1,044,392	36.8
			자연환경보전·이용시설 조성	3,922,783	260,680	3,662,103	6.6
	수질오염관리			15,854,734	14,393,385	1,461,349	90.8
		왕궁축산폐수 처리기능보강		15,854,734	14,393,385	1,461,349	90.8
			왕궁축산폐수 공공처리시설	15,271,000	14,155,400	1,115,600	92.7
			왕궁특수지 가축분뇨 수집운반및사용료보조	583,734	237,985	345,749	40.8
	행정운영경비			41,488	21,117	20,371	50.9
		기본경비		41,488	21,117	20,371	50.9
			기본경비	41,488	21,117	20,371	50.9

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
녹색환경과				901,880	498,064	403,816	55.2
	수질개선관리			105,687	24,871	80,816	23.5
		수질개선		104,650	24,871	79,779	23.8
			수질오염관리	104,650	24,871	79,779	23.8
		예비비		1,037	0	1,037	0.0
			예비비	1,037	0	1,037	0.0
	재무활동			796,193	473,193	323,000	59.4
		내부거래지출		796,193	473,193	323,000	59.4
			내부거래지출	796,193	473,193	323,000	59.4

▣ 수질개선특별회계

2018 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 악취저감으로 시민이 행복한 품격도시 조성

‣악취배출사업장 지도.점검	: 65개소

- 악취 시료채취 : 22개소

‣배출허용기준 초과업소 개선명령을 통한 시설개선	: 4개소

‣악취저감을 위한 협력적 거버넌스 추진	: 3회/215명

- 사업장 환경기술인, 악취모니터링요원, 시민단체 등

◦ 왕궁정착농원 생활환경 개선으로 한센인의 삶의 질 향상

‣휴․폐업축사 매입 : 1농가 635㎡(전체 계획량 대비 92% 매입)

‣바이오순환림 조성대상지 슬레이트 철거 완료 : 53개소 13,665㎡

◦ 가축분뇨 적정처리 및 익산천 생태하천 복원사업 추진으로 새만금 수질개선

‣가축분뇨공공처리시설 안정적 처리              : 580톤/일

‣생태하천 복원으로 새만금 수질개선[BOD 15.7('14년) → 2.9('18년)]

◦ 기후변화대응 저탄소 녹색 청정도시 조성

‣2017년 대비 온실가스 배출량 감축	: 4,644톤

‣탄소포인트제 가입세대 지속증가	: 40,130세대

‣환경오염물질 배출업소 행정처분(고발, 과태료 등)	: 55개소

‣황사·미세먼지 방지 마스크 보급	: 20만개/150백만원

◦ 배출시설 관리로 행복을 주는 생활환경 실현

▸환경오염물질 배출업소 지도점검 : 527개소

- 분 야 별 : 대기 70, 폐수 119, 소음 79, 가축분뇨 116, 비산먼지 133, 석면건축물 10

- 행정처분 : 66건(고발, 사용중지, 조업정지, 과태료 등)

□ 반      성

◦ 국가정책과 연계한 미세먼지 저감정책과 우리시 자체실정에 맞는 저감방안을 추진하였으나, 시민의 체감도는 중국발 외부요인이 너무 커서 다소 낮은 것으로 판단됨

2018 주요업무 추진상황

		미세먼지 저감대책 추진 악취저감으로 시민이 행복한 품격도시 조성 금마서동 생태관광지 조성 배출시설 관리 강화로 쾌적한 환경 조성 왕궁정착농원 휴 ․ 폐업 축사 매입 새만금 상류 바이오순환림 조성 가축분뇨 공공처리시설 운영(BTO) 지원 장점마을 주민 민원관련 추진상황

1		미세먼지 저감대책 추진

□ 사 업 개 요

◦ 추진방향 : 국책연계사업 및 우리시 맞춤형 저감대책 추진

◦ 사업기간 : 연중(봄, 가을, 황사철 집중대응 추진)

◦ 사업내용

▸국책연계 : 친환경자동차 보급, 운행경유차 배출가스 저감 등

▸맞 춤 형 : 마스크 보급, 살수차 운행, 공기알리미, 연구용역 등

◦ 사 업 비 : 8,603백만원(국비4,228 도비1,037 시비3,338)

□ 상반기 추진실적

◦ 친환경자동차 보급지원                          :  87대/1,138백만원

▸천연가스버스 보급                            :    7대/124백만원

▸어린이통학차량의 LPG차 전환지원             :   25대/125백만원

▸전기자동차 보급                              :   55대/889백만원

◦ 운행경유차 배출가스저감 보조금 지원사업         : 364대/1,204백만원

▸노후경유차조기폐차 지원                       :  294대/321백만원

▸PM-NOx 저감장치 부착지원                   :   22대/340백만원

▸건설기계 배출가스 저감장치(DPF)부착지원     :   15대/147백만원

▸노후경유차 DPF, 서울시 진입제한차량 보상     :     7대/61백만원

▸건설기계 엔진교체                           :    26대/335백만원

◦ 미세먼지 저감 도로노면청소차량 운행

▸고농도기시(3~5월, 10~11월)살수차 및 노면흡입식 청소차량 운영

▸살수차 3대(일 8시간), 노면청소차 6대(일 6시간) 운행

- 살수차 운행(3~5월)                         :       53백만원

◦ 사업장 미세먼지 관리

▸중소기업 저녹스 보일러 교체지원                 : 2대/10백만원

▸대기배출사업장·비산먼지 발생사업장 점검·행정처분 : 203개소/33개

◦ 황사·미세먼지 방지 마스크 보급                      : 20만개/150백만원

▸대    상 : 어린이집, 유치원, 65세이상 노인 – 6만6천매(3매/인)

□ 하반기 추진계획

◦ 친환경자동차 구매지원 지속추진                    : 2018. 7. ~ 12.

▸관용 경유자동차 전량 전기차 또는 LPG차량으로 점진적 전환

▸어린이집 경유차(2009년 이전) LPG차량으로 전환 : 국비확보

◦ 미세먼지 저감 도로노면청소실시                   : 2018. 7. ~ 12.

▸지속적인 살수차운행에 따른 살수차구입 검토

◦ 운행경유차 배출가스 저감사업 지속추진            : 2018. 7. ~ 12.

◦ 대기질 알리미 신호등 설치·운영                   : 2018. 7. ~ 12.

▸공기알리미 미세먼지 신호등                    : 10개소/100백만원

▸미세먼지 신호등 경관조명형                    : 1개소/50백만원

◦ 미세먼지특성분석 및 관리대책 수립연구 최종보고회 실시 : 2018. 12.

2		악취저감으로 시민이 행복한 품격도시 조성

□ 사 업 개 요

◦ 현   황  :  1,279개소

환경기초시설 및 음식물 처리시설(7)							악취관리지역 (제1․2산업단지)			악취관리지역 외 신고대상	가축분뇨
생 활 폐기물 소각장	금강하수 처 리 장	금강동 야적장	부송동 야적장	공단폐수 처 리 장	가축분뇨 처 리 장	음식물 처리장	계	1산단	2산단
200 (톤/일)	10만 (톤/일)	2만 (톤)	10만 (톤)	3만 (톤/일)	700 (톤/일)	150 (톤/일)	90 (개소)	25 (개소)	65 (개소)	2	1,180

◦ 기   간  :  2018. 1. ~ 12월 (하절기 취약시간대 집중관리 필요)

◦ 방   법  :  정기 및 수시 점검(민원유발업체 악취검사)

◦ 내   용  :  악취배출허용기준 이내 관리, 악취시설 개선 보조금 지원 등

□ 상반기 추진실적

◦ 2018년도 악취종합계획 수립·시행	: ‘18. 1.

◦ 악취배출사업장 지도점검으로 악취저감 시설개선 유도

‣지도점검 : 65개소       ‣행정처분내역 : 개선명령 4건

‣시설개선 : 14개소       ‣투자(자체)금액 : 2,816백만원

◦ 악취시설 개선 보조금 지원사업 교부결정              : ‘18. 3.~6.

‣지원대상 : 디와이(주)익산공장 외 4개소

‣총사업비 : 284백만원(보조금 74, 자부담 210)

◦ 악취저감을 위한 거버넌스 행정 추진(3회/215명)       : ‘18. 2.~5.

‣사업장 환경기술인, 악취모니터링요원, 시민단체 등

◦ 야간 악취상황실 조기 운영                           : ‘18. 5.~10.

◦ 악취모니터링 요원 모집 및 운영(100명)               : ‘18. 6.~10.

□ 하반기 추진계획

◦ 악취배출사업장 정기 및 수시 지도점검으로 악취저감 시설개선 유도

◦ 악취 상시감시체계 구축, 취약시간대 민관 야간 합동점검  : ‘18. 7.~ 10.

◦ 악취시설 개선 보조금 지원대상 추가지원 및 교부      : ‘18. 7. ~12.

3		금마서동생태관광지조성

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2015년 ~ 2024년(10년간)

◦ 사 업 명 : 금마 서동 생태관광지 조성사업

◦ 총사업비 : 7,300백만원 (국 3,600, 도 1,900, 시 1,800)

◦ 위    치 : 금마면 동고도리 497-5번지 일원(금마저수지 인근)

◦ 사업내용 : 금마저수지 수변의 생태습지 복원, 생태습지관찰로 조성

□ 상반기 추진실적

◦ 생태관광지조성 마스터플랜 수립 용역	:  2015. 8 ~ 12.

◦ 전북도 사업조정 재조정 통보                      :  2017. 09

‣ 추진  6개사업, 3,250백만원

◦ 저수지 목적외 사용승인 재협의(한국농촌공사)     : 2017. 9 ~ 18. 2.      ◦ 익산시 공공디자인 심의                         : 2018. 5

◦ 익산시 자체설계심의                            : 2018. 6

□ 하반기 추진계획

◦ 관찰로(데크) 전라북도 원가심사                : 2018. 7

◦ 사업 착수 및 준공                             : 2018. 7 ~ 12.

◦ 금마저수지 생태습지 복원 사업                 : 2018. 9 ~ 2019. 4.

◦ 용화산 탐방로 정비사업 등 생태관광사업 지속적 발굴 추진

4		배출시설 관리 강화로 쾌적한 환경 조성

□ 사 업 개 요

◦ 현   황                                           (단위 : 개소)

계	대기	폐수	소음진동	비산먼지	가축분뇨	기타수질	실내공기질
2,746	244	527	324	211	1,180	151	109

◦ 사업기간 : ‘18. 1 ~ 12월

◦ 점검방법

▸정기점검 : 환경오염물질배출시설 통합지도점검 계획 수립 시행

▸수시점검 : 검찰‧환경청‧도청‧민관 합동점검 또는 시·군 교차점검

◦ 점검방향 : 행정지도 위주 점검, 상습‧고의적인 위반 사업장 강력조치 확행

□ 상반기 추진실적

◦ 환경오염물질배출시설 통합지도점검 계획 수립 : 2018. 1월.

◦ 환경오염배출업소 통합 지도점검

▸ 수질 119개소, 행정처분 13개소  ▸ 대기 70개소, 행정처분 23개소

▸ 소음・진동 79개소, 행정처분 4개소    ▸ 가축분뇨 116개소, 행정처분 9개소

※ 과태료부과 : 48건, 43,100천원

◦ 비산먼지 및 특정공사 배출 사업장 지도점검 : 133개소, 행정처분 17개소

◦ 석면함유 건축물 적정관리 지도점검

▸석면건축물 관리방법 안내 3회 및 석면건축물 점검 10개소

◦ 자동차 배출가스 지도 단속

▸ 화물차 등 67대(적합)

□ 하반기 추진계획

◦ 환경오염물질 배출사업장 정기 및 수시 지도점검

◦ 실내공기질, 석면함유 건축물 적정관리 안내 및 지도점검

◦ 자동차 배출가스 지도 단속

5		왕궁정착농원 휴․폐업 축사 매입

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2010년~2018년

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원(3개 한센인 정착 촌 내)

◦ 사 업 량 : 217,673㎡

◦ 사 업 비 : 21,250백만원(도비 4,100, 시비 17,150)

▸'18년 사업비/계획량 : 2,500백만원(도비 900, 시비 1,600) / 17,445㎡

▸시비 1,600백만원 미확보로 추경에 확보 필요

◦ 사업내용 : 휴․폐업축사 협의 매입

□ 상반기 추진실적

◦ 2018년 휴․폐업축사 매입 신청 접수	: 2018.  2.  6.~2. 28.

◦ 지장물 조사 및 물건조서 작성	: 2018.  3. 16.~4. 20.

◦ 감정평가 실시(19농가/39필지/18,174㎡)	: 2018.  5.  8.

◦ 매입가격 확정 및 통보	: 2018.  6. 14.

□ 하반기 추진계획

◦ 휴․폐업축사 매입 협의(익산시↔소유자)	: 2018.  7.  1. ~

◦ 매매계약 체결 및 소유권 이전	: 2018.  8. 30.

◦ 매입 대금 지급	: 2018.  9. 10.

◦ 매도자 주거이전 및 사업정산	: 2018. 10. ~ 12.

6		새만금 상류 바이오순환림 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2010년~2018년

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원(3개 한센인 정착 촌 내)

◦ 사 업 량 : 332,903㎡[종합대책이전('05년~'09년) 매입 축사 포함(115,230㎡)]

◦ 사 업 비 : 16,750백만원(지특 13,500, 시비 3,250)

▸'18년 사업비/계획량 : 2,000백만원(지특 1,000, 시비 1,000) / 35,347㎡

◦ 사업내용 : 휴․폐업축사 철거, 바이오순환림 조성

□ 상반기 추진실적

◦ 2017년도 바이오순환림 조성사업(1차) 착공	: 2018.  2.  1.

▸현 공정율 : 철거 기준 60%

◦ 폐기물(폐콘크리트, 폐석면 등) 처리(7,300톤, 50%) : 2018.  3. ~

◦ 석면(슬레이트)철거 완료(13,665㎡)	: 2018.  5. 31.

□ 하반기 추진계획

◦ 2017년도 바이오순환림 조성사업(1차) 축사철거 완료	: 2018.  7. 10.

◦ 2017년도 바이오순환림 조성사업(1차) 수목식재  : 2018. 10.~

◦ 2017년도 바이오순환림 조성사업(1차) 준공	: 2018. 12. 31.

◦ 2018년도 바이오순환림 조성사업(2차) 실시설계	: 2018.  7.~

◦ 2018년도 바이오순환림 조성사업(2차) 공사추진	: 2018. 11.~2019.  5.

7		가축분뇨공공처리시설 운영(BTO) 지원

□ 사 업 개 요

◦ 운영기간 : 2012.  4.  1 ~ 2027. 3. 31(준공후 15년)

◦ 사 업 량 : 시설용량 700㎥/일

◦ 총사업비 : 54,243백만원(국비 39,650  도비 2,173  민자 12,420)

▸'18년 예산 : 7,172백만원(도비 140, 시비 7,032)

◦ 운 영 자 : 뉴워터주식회사

□ 상반기 추진실적

◦ 반입 처리량

구 분		'18.5.	‘17.	‘16.	‘15.	‘14.	‘13.	‘12.	비 고
반입․처리량 (톤/일)	계획	700	700	700	700	686	679	673	양돈 85,537두 (학호마을 포함)
	실적	613	602	636	616	636	681	672

◦ 방류수 수질(일평균)

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
계 획	24	40	24	48	6
실 적	1.4	23.1	2.8	11.90	0.05

◦ 가축분뇨 공공처리시설 지도점검 : 9회(전라북도 2회, 익산시 7회)

▸방류수 수질 검사, 준수사항 이행여부, 시설적정 가동여부

◦ 민간위탁금 집행현황

▸집행율: 84.7%(집행액 6,077백만원)

□ 하반기 추진계획

◦ 운영사[뉴워터(주)] 시설운영 적정 여부 집중 점검

▸보증수질 초과 시 손해배상금부과 등 강력한 행정조치

8		장점마을 주민 민원관련 추진 상황

□ 사 업 개 요

◦ 장점마을 주민 집단 암 발생(사망12명, 투병중8명) 원인 규명을 위한 용역 추진

◦ 환경오염실태조사 및 주민건강영향조사에 따른 대책 수립 및 조치

□ 상반기 추진실적

◦ 장점마을 환경비상대책 민관협의회 운영	: ‘17.5.17~

◦ 환경부 주민건강영향조사 용역 실시	: ‘17.12.8.~

▸ 예   산  : 4.5억원 (국비 : 3.152억원/시비 : 1.348억원)

▸ 용역기관 : 환경안전건강연구소

▸ 용역기간 : 2017.12.8.~2018.12.7

◦ 농산물 및 농업용수 오염여부 관련 품질(성분검사) 추진   : ‘18.1.4./2.2

▸ 분석항목 : 카드뮴, 납

▸ 분석결과(기준) : 카드뮴(0.03~0.13/0.2,0.1(고추)), 납(0.13~0.18/0.3)

◦ 환경부 민관합동조사협의회 개최	: ‘18.2.22.

▸ 용역 수행기관 연구과제 관련 논의(오염원 조사방법 등)

◦ 인근 장고재·왈인마을 상수도 미설치 가구 급수공사 완료  : ‘18.5.15.

▸장점마을 외 2개 마을 : 56세대 설치/예산 : 91,062천원

□ 하반기 추진계획

◦ 장점마을 환경비상대책 민관협의회 운영	: 수 시

◦ 환경부 주민건강영향조사 중간보고 및 최종보고