도시재생과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 상반기 성과 및 반성
□	2018 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 행복한 품격도시 익산건설을 위해 시민 중심의 도시 계획과 개발 및 관리

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	미래지향적인 도시계획수립 인간과 환경을 중시하는 도시개발 시민중심의 도시문제 해소

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	시민이 공감하는 도시관리계획으로 지역간 균형발전 도모 친환경적이고 생활을 중시하는 도시개발 원도심 재생을 통한 생활환경개선 및 지역활성화

일   반   현   황

□ 기     구

						도시재생과
재생행정			도시계획			도시개발				재생디자인			재생시설			자전거정책

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	1	6	7	6	4
현 원	23	-	1	7	9	4	2
증 감	△2	△1		1	2	△2	△2

□ 사 무 분 장

◦ 재생행정  :  국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 개발행위 허가

◦ 도시계획  :  도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정

◦ 도시개발  :  도시계획 도로개설 사업 시행

◦ 재생디자인  :  도시재생활성화사업, 경관기본계획 및 공공디자인기본계획수립

◦ 재생시설  :  새뜰마을 사업, 도시재생 시설사업

◦ 자전거정책  :  자전거정책 수립, 자전거도로 계획수립 및 시행

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.925	76.091	214.809	194.046	21.979
비율(％)	100	15.0	42.4	38.3	4.3

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	76.091	17.835	1.869	10.888	45.499
비율(％)	100	23.4	2.5	14.3	59.8

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	경관지구	미관지구	고도지구	방화지구	보존지구 (역사문화환경 보존지구)	취락지구 (자 연 취락지구)	비 고
지구수	135	3	29	10	9	1	83
면 적	20,260	12,680	2,478	985	1,180	202	2,735

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : ㎡, 백만원, %)

시 설 명		시설결정		집행시설		미집행시설			집행률 (%)
		개소	면적	개소	면적	개소	면적	사업비
총 계		1,990	32,375,864	1,838	26,964,279	152	5,411,585	602,464	83.3
도로	소 계	1,412	12,645,039	1,304	11,989,407	108	655,632	165,516	94.8
	광 로	6	1,245,244	5	1,160,250	1	84,994	8,500	93.2
	대 로	68	4,171,693	44	3,807,930	24	363,763	101,659	91.3
	중 로	351	4,710,707	334	4,595,504	17	115,203	26,671	97.6
	소 로	987	2,517,395	921	2,425,723	66	91,672	28,686	96.4
공원	소 계	105	5,853,038	83	1,762,109	22	4,090,929	389,890	30.1
	근린공원	50	5,215,711	31	1,341,612	19	3,874,099	364,847	25.7
	역사공원	2	76,461	1	50,593	1	25,868	3,945	66.2
	수변공원	2	28,058	1	8,512	1	19,546	4,886	30.3
	어린이공원	39	91,130	39	91,130	0	0	0	100.0
	소공원	10	36,659	10	36,659	0	0	0	100.0
	문화공원	1	35,279	1	35,279	0	0	0	100.0
	묘지공원	1	369,740	0	198,324	1	171,416	16,212	53.6
녹지	소 계	99	1,188,984	84	575,376	15	613,608	40,803	48.4
	완충녹지	79	1,124,936	65	514,898	14	610,038	40,595	45.8
	경관녹지	16	58,288	15	54,718	1	3,570	208	93.9
	연결녹지	4	5,760	4	5,760	0	0	0	100.0
기타	소 계	374	12,688,803	367	12,637,387	7	51,416	6,255	99.6
	주차장	49	149,033	49	149,033	0	0	0	100.0
	광 장	32	677,209	27	666,100	5	11,109	1,366	98.4
	공공청사	16	197,203	16	197,203	0	0	0	100.0
	유원지	1	31,200	0	0	1	31,200	4,068	0.0
	운동장	1	260,000	0	250,893	1	9,107	821	96.5
	기 타	275	11,374,158	275	11,374,158	0	0	0	100.0

2018 예산집행실적

【 2018. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도시재생과					19,827,852	8,319,503	11,508,349	42
	도시개발관리				19,604,639	8,280,301	11,324,338	42.2
		도시계획			617,999	570,406	47,593	92.3
			도시계획관리		612,999	570,406	42,593	93.1
				일반운영비	61,796	49,025	12,771	79.3
				여비	42,000	17,500	24,500	41.7
				업무추진비	13,000	7,678	5,322	59.1
				시설비	496,203	496,203	0	100	사고이월
			전국체전 및 장애인체전		5,000	0	5,000	0
		도시계획도로개설(대로)			3,111,935	2,549,823	562,112	81.9
			도･농 연결도로개설		396,499	257,529	138,970	65	이월포함
			마한로 미개설구간 도로개설		1,795,346	1,390,040	405,306	77.4	이월포함
			KTX 서부역사 진입로 확장사업		822,000	821,577	423	99.9
			산업도로(대로1류2호) 확장공사		10,675	10,675	0	100	계속비이월
			목천동원주@~우석장례 예식장간 도로확장		13,522	7,893	5,629	58.4	명시이월
			안전한 보행환경 조성사업		73,893	62,109	11,784	84.1	명시이월
		도시계획도로개설(중로)			2,933,252	1,713,318	1,219,934	58.4
			남부지구 중로2류43호 도로개설		288,199	1,277	286,922	0.4	이월포함
			춘포면사무소~춘포역간 도로개설		578,497	468,360	110,137	81	이월포함
			명일아파트옆(중로2류2호) 도로개설		400,000	19,391	380,609	4.8
			황등 중로(2차) 도로개설		291,681	291,681	0	100	사고이월
			모현동 배산~장신택지간 도로개설		1,374,875	932,609	442,266	67.8	이월포함
		도시계획도로개설(소로)			4,799,679	1,099,258	3,700,421	22.9
			함열 소로3류~10호선 도로개설		199,000	1,337	197,663	0.7
			모현동 소로3-49호선 도로개설		350,000	1,539	348,461	0.4	이월포함

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			영등동 청아아파트옆 외 3개노선 도로개설	37,226	26,099	11,127	70.1	이월포함
			함열 미력리(소로1류8호) 도로개설	694,820	648,736	46,084	93.4	이월포함
			미불용지 보상	1,024,858	3,864	1,020,994	0.4	이월포함
			소라산~영등소라성당간 도로개설	995,200	0	995,200	0
			함열미력리(소로1류7호, 소로2류39호) 도로개설공사	500,000	26,373	473,627	5.3
			구 모현동사무소 옆 도로개설	219,512	198,903	20,609	90.6	이월포함
			함열 동지산 진입도로 개설	300,000	0	300,000	0	명시이월
			금마시장뒤 도로개설	233,168	2,622	230,546	1.1	명시이월
			황등도서관 진입로 확장공사	13,584	13,584	0	100	사고이월
			송학동 망기마을 진입로 개설	33,431	0	33,431	0	명시이월
			송학동 학곤선 (소로3류66호)도로개설	198,880	176,201	22,679	88.6	명시이월
		신규 도시개발 사업		2,707,929	729,788	1,978,141	27
			함열 금호맨션 앞 (소로2류2호) 도로개설	199,000	5,363	193,637	2.7
			동익산역 진입도로개설	100,000	81,849	18,151	81.8
			송학동(소로3-89) 도로개설공사	200,000	167,865	32,135	83.9
			황등면 신흥석재앞 교차로 가각부 개선공사	89,550	0	89,550	0	이월포함
			신동(소로3-101) 도로개설공사	565,465	7,397	558,068	1.3	이월포함
			송학동 학곤선 (대로3류7호) 도로개설	1,000,000	66,643	933,357	6.7
			용안면 한양식당 옆 도로개설	166,367	62,542	103,825	37.6	명시이월
			모현동 롯데슈퍼 옆 도로개설	200,000	186,206	13,794	93.1	명시이월

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			송학동 포스코아파트 앞 도로개설	30,527	21,427	9,100	70.2	이월포함
			어양동 함지박 옆 가각부 개선공사	64,886	47,907	16,979	73.8	명시이월
			남중동 소로2류144호 도로개설	81,242	74,247	6,995	91.4	명시이월
			익산역 안내간판 설치공사	10,892	8,342	2,550	76.6	명시이월
		도시경관디자인 조성		964,854	451,748	513,106	46.8
			도시디자인	275,780	152,195	123,585	55.2	이월포함
			도시경관 개선사업	632,600	292,899	339,701	46.3	이월포함
			경관협정 지원사업	56,474	6,654	49,820	11.8	이월포함
		도시재생		4,110,538	964,857	3,145,681	23.5
			도시재생사업	27,530	14,110	13,420	51.3
			도시재생 아카데미 및 지원센터 운영	30,400	6,725	23,675	22.1
			지역역량강화 (도시활력증진지역개발)	60,000	10,000	50,000	16.7
			재생시설	10,748	5,157	5,591	48
			취약지역 개조 (도시/새뜰마을사업)	2,443,279	539,000	1,904,279	22.1	이월포함
			취약지역 개조 (도시/동산동 월담지구 새뜰마을사업)	1,538,581	389,865	1,148,716	25.3	이월포함
		자전거도로 이용시설 활성화사업		358,453	201,103	157,350	56.1
			자전거도로 이용시설 활성화사업	358,453	201,103	157,350	56.1	이월포함
	행정운영경비			113,213	39,202	74,011	34.6
			인력운영비	76,766	14,615	62,151	19
			기본경비	36,447	24,587	11,860	67.5
특별회계				110,000	0	110,000	0
		장기미집행 도시계획		110,000	0	110,000	0

2018년 상반기 성과

□ 성      과

◦ 도시재생 사업으로 원도심 지역 활성화에 기여

▸익산시 도시재생(중심시가지형)활성화계획(안) 수립

▸도시재생 주민공동협의체 구성･운영 : 정기회의 3회

▸도시재생 아카데미(심화과정) 운영 : 2018. 5. 23. ~ 5. 24.

- 팀별 집중검토회의를 통한 지역의제 발굴

▸관사마을 주민공동이용시설 민간위탁 시행 : 2018. 2.

▸새뜰마을사업 슬레이트 지붕개량 및 빈집 정비 : 4가구

◦ 도시계획도로 개설을 통한 시민 편익증진 기여

▸구)모현동사무소 옆 도로개설(L=560m, B=8m)

▸남중동 이고 ~ 남중파출소간 도로개설(L=30, B=8m)

◦ 자전거 이용 활성화 사업으로 자전거 이용자 만족도 증가

▸익산시 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 완료	: 2018. 3.

- 자전거 이용 시설 간 연계 및 타 수단 교통로와의 연계 방안 등 도출

▸익산시민 자전거 보험 가입	: 2018. 3. 2.

- 사망 및 후유장애, 진단 위로금 지원 등

▸웅포 곰개 나루 자전거 대여소 운영

- 4월 ~ 6월(주말 및 공휴일 운영), 자전거 무료 대여(50대)

□ 반      성

◦ 도시계획도로 개설 공사 편입토지 보상 협의 어려움으로 공사 지연

▸소유주 지속적인 설득 및 협의로 적기 공사 추진

2018 주요업무 추진상황

		도시관리계획(재정비)수립용역 도시재생 중심시가지형 뉴딜사업 KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업 동산동 월담지구 새뜰마을사업 익산시 기본경관계획 재정비 수립용역 송학동 학곤선 도로개설 함열 미력리 도로개설 자전거이용 활성화 사업 전국체전대비 주요 간선도로변 벽화조성

1		도시관리계획(재정비) 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업범위 : 익산시 전지역(506.925㎢) / 10년계획

◦ 사업기간 : 2016. 5. ~ 2018. 12.

◦ 사 업 비 : 842백만원

◦ 내    용 : 익산시 도시관리계획 전반에 대한 재검토

▸익산시 여건변화를 수용한 용도지역․지구, 도시기반시설 계획 등 전반 재검토

▸관련법 개정 등 제도변화에 따른 후속조치(토지적성평가, 재해취약성분석 등)

□ 상반기 추진실적

◦ 도시관리계획 용역 착수	: 2016. 5. 20.

◦ 현황조사 및 분석	: 2016. 5. ~ 2017. 5.

▸지역현황조사, 민원분석 및 현장조사

▸토지적성평가, 재해취약성분석, 교통성, 경관성, 사전재해영향성검토

◦ 장기미집행 도시계획시설 폐지(변경) 추진	: 2017. 6. ~ 2018. 3.

▸주민의견수렴, 관계기관 부서 협의, 도시계획위원회 심의 등

▸미집행 도시계획시설(도로 등) 277개소 변경(해제)

◦ 도시관리계획 재정비 변경안 작성	: 2018. 1. ~ 2018. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 도시관리계획 재정비 입안(안) 보고	: 2018. 7.

◦ 토지적성평가 사전심의(도시계획위원회)           : 2018. 7.

◦ 주민의견수렴, 기관부서협의 등 관련 절차 이행	: 2018. 7. ~ 11.

▸주민의견청취(공람 공고, 설명회 등) 14일 이상

▸의회의견청취

▸관련기관부서협의(환경, 재해, 교통, 문화재, 농지, 산지 등 전반)

◦ 시 도시계획위원회 자문 및 심의	: 2018. 12.

▸자문 : 전북도 결정사항

▸심의 : 시장 결정사항

◦ 전북도 결정신청, 도 도시계획위원회 심의･결정고시	: 2019. 1. ~ 3.

2		도시재생 중심시가지형 뉴딜사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 역사가(驛史街) 문화로(文化路)

◦ 위    치 : 익산시 중앙동1가 24번지 일원(원도심 지역)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)

◦ 사업면적 : 185,007㎡

◦ 사 업 비 : 250억(국 150 도25 시 75)

◦ 사업내용 : 기초생활인프라 조성, 상권활성화사업, 생활환경개선사업

공기업참여사업(공공상가임대사업), 문화관광자원화사업,

특화거리조성, 도시재생대학 및 도시재생 비지니스육성 등

□ 상반기 추진실적

◦ 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 공모 선정	: 2017. 12. 14.

◦ 도시재생 선도지역 지정	: 2018.  4. 24.

◦ 도시재생 활성화계획(안) 평가요청서 제출	: 2018.  6. 8.

▸쟁점사항에 반영된 도시재생 활성화계획(안) 수립

▸익산시 → 국토부 평가지원단(검토)  → 평가단(최종 평가)

◦ 도시재생 활성화계획 수립(안) 도시재생위원회 심의	: 2018.  6. 19.

◦ 도시재생 활성화계획 수립(안) 승인신청	: 2018.  6. 20.

□ 하반기 추진계획

◦ 도시재생 활성화계획 국토부 승인 및 확정	: 2018. 6. ~ 7.

▸도시재생 특별위원회 심의 및 승인(국토부)

◦ 도시재생사업 시행(5개년)	: 2018. 8. ~

3		KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원 (면적 : 35,089㎡)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4개년)

◦ 총사업비 : 6,924백만원(국비 4,368, 도비 578, 시비 1,978)

◦ 사업내용 : 도로개설, 철도변 완충녹지 정비, 도시가스공급, 경로당 신축,집수리, 주민역량강화 및 마을공동체 지원사업 등

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2017년 이전	2018년			비고
			소계	확보	미확보
총계	6,924	2,986	1,938	1,938
국비	4,368	3,160	1,208	1,208
도비	578	423	155	155
시비	1,978	1,403	575	575

□ 상반기 추진실적

◦ 관사마을 주민공동이용시설 민간위탁 시행(주민협의체)	: 2018. 2.

◦ 완충녹지조성 및 가로환경개선사업 실시설계 착수	: 2018. 3.

◦ 도로개설구간 철도승무원 숙사 수용재결신청	: 2018. 4.

◦ 주민역량강화 프로그램 완료	: 2018. 5.

◦ 도로개설 및 좁은길 확장 보상(173백만원/3필지 359㎡)	: 2018. 5.

◦ 주택정비지원사업(빈집정비) 2개소 완료	: 2018. 5.

◦ 지방토지수용위원회 수용 결정	: 2018. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 도로개설공사 재착공 및 완료	: 2018. 10.

◦ 주민 휴먼케어사업 추진	: 2018. 8. ~ 12.

◦ 완충녹지조성 및 가로환경개선사업 착수 및 추진	: 2018. 8. ~ 12.

4		동산동 월담지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 동산동 356번지 일원(사업면적 약43,300㎡)

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2019.(4개년) / 사업면적 약50,456㎡

◦ 사 업 비 : 3,849백만원(국비 2,694, 도비 347, 시비 808)

◦ 사업내용 : 주택정비 지원,  안전확보, 생활 ･ 위생인프라, 마을공동체                   지원사업,  주민역량강화사업 등

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2017년 이전	2018년			비고
			소계	확보	미확보
총계	3,849	914	972	972		1,963
국비	2,694	640	680	680		1,374
도비	347	82	87	87		178
시비	808	192	205	205		411

□ 상반기 추진실적

◦ 집수리선정위원회 개최(1차)	: 2018. 3.

◦ 사면보강 및 마을안길정비사업 실시설계 착수	: 2018. 3.

▸일부 주민 진정민원 발생 등 사업 취소 요구로 공사 중지중(5.9.)

◦ 일부주민 사업취소요구에 따른 주민 면담	: 2018. 3. ~ 5.

(주민설명회 3회, 개별면담 3회, 국토부 주민면담 1회 )

◦ 주민의견 수렴 및 주민설득	: 2018. 6. ~ 7.

□ 하반기 추진계획

◦ 산사태위험지역 개선공사 추진	: 2018. 8. ~ 12.

◦ 사면보강 및 마을안길정비사업 실시설계 재추진	: 2018. 8. ~ 9.

◦ 주택정비사업 추진	: 2018. 6. ~ 12.

5		익산시 기본경관계획 재정비 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역대상 : 익산시 전지역(506,925㎡)

◦ 용역기간 : 2017. 5. ~ 2018. 9.

◦ 용 역 비 : 286백만원

◦ 용역내용

▸경관계획 재정비 : 경관‧미관지구, 중점관리구역 재정비

▸공공디자인 진흥계획 수립 : 공공시설물디자인 가이드라인 수립

◦ 용역수행자 : ㈜도화엔지니어링, ㈜도시경관연구소 율

□ 상반기 추진실적

◦ 용역 착수	: 2017. 5. 23.

◦ 용역 중간 보고회(2회)	: 17. 11./18. 3.

◦ 용역 일시 중지	: 2018. 4. 16.

‣행정절차(지방의회의견청취)에 따른 용역 중지

◦ 경관계획 수립안 보고	: 2018. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 관련기관 협의 및 주민 공청회, 시의회 의견청취	: 2018. 7.

◦ 경관위원회 및 공공디자인위원회 심의	: 2018. 8.

◦ 경관계획 공고 및 열람	: 2018. 9.

6		송학동 학곤선(대로3-7호) 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 송학동지안리즈아파트 ~ 한국타이어 티스테이션

◦ 사업규모 : 도시계획도로 개설 L=750m , B=8→25m(대로3류7호)

▸ 우수관 암거BOX(2.5*2) L=373m, D450~D800 L=361m

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.

◦ 총사업비 : 5,500백만원(공사비 4,500 보상비 1,000)

▸ 2018년 예산 : 1,000백만원

□ 그간 추진실적

◦ 실시계획인가고시	: 2007. 3. 2.

◦ 토지보상	: 2004. 3. ~ 2009. 12.

◦ 공사착공 및 준공(폭8M)	: 2009. 11 ~ 2010.3.

◦ 시 투･융자심사(적정)	: 2017. 11. 2.

◦ 실시설계용역 착공	: 2018. 2. 27.

□ 하반기 추진계획

◦ 실시설계용역 준공	: 2018. 7. 20

◦ 공사착공(1차분, L=500m)	: 2018. 8. ~

7		함열 미력리(소로1류8호) 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열읍 와리 809번지 일원

◦ 사업규모 : L=462m , B=10m(소로1류8호)

◦ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용 : 도시계획도로개설

◦ 총사업비 : 2,000백만원(공사비 1,355․보상비 645)

※ 연도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구분	총 계	~2017년	2018년	2019년~
총계	2,000	1,305	695	0
도비	440	440
시비	1,560	865	695

◦ 2018년 예산 : 695백만원 (본예산 398․명시 138․사고159)

□ 그간 추진실적

◦ 도시계획시설 실시계획인가 고시	: 2010. 3.

◦ 편입용지 보상 완료	: 2017.12

◦ 실시설계용역 완료	: 2015. 5.

◦ 1차분 공사 준공(L=230m)	: 2018. 5.

◦ 2차분 공사 착공(L=232m)	: 2018. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 도로개설 완료	: 2018. 11

8		자전거 이용 활성화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 익산시 자전거이용 활성화 계획 수립 용역

▸용역기간 : 2017. 7. 20. ~ 2018. 3. 5.

▸용 역 비 : 60백만원

▸주요내용 : 자전거이용 시설 간 연계 및 타 수단 교통로와의 연계  방안 도출 등

◦ 녹색 교통 만들기 사업

▸사업기간 : 매년 3월~6월, 8월~11월  2회/년

▸위    치 : 모현동 자전거 보관소(구. 이리농악전수관)

▸주요내용 : 방치․폐자전거 수거 및 수리, 저소득층 기증

- 민생경제과 지역공동체 일자리 사업 인력 활용(4명)

◦ 웅포 곰개나루 자전거 대여소 운영

▸사업기간 : 매년 4월~6월, 9월~11월(주말 및 공휴일 운영)

▸위    치 : 웅포 곰개나루 관광지 내 자전거 대여소

▸주요내용: 재생자전거를 이용한 자전거 이용 활성화 도모

- 자전거 무료대여(50대 운영), 기간제 인력 채용․활용(2명)

□ 상반기 추진실적

◦ 익산시 자전거이용 활성화 계획 수립 용역

▸익산시 자전거도로 노선 선정(전체 116개 노선 L=178Km)

▸5개년(2018~2022년) 사업 계획 설정(27개 노선 29Km, 2,350백만원)

◦ 녹색 교통 만들기 사업

▸방치․폐자전거 및 기증 자전거 수거: 246대

▸재생자전거 생산 : 79대

- 읍면동 업무용자전거 9대, 웅포 자전거 대여소: 25대, 모현동 보관소 45대

◦ 웅포 곰개나루 자전거 대여소 운영

▸ 무료 자전거 대여 : 2,751대(누계 대여횟수, 2018. 6.17일 기준)

□ 하반기 추진계획

◦ 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역에 의거 자전거도로 정비

▸ 자전거 도로(원광대~고속터미널 등) 정비 예산확보 후 추진 : 2018. 7. ~ 12.

◦ 녹색교통만들기 사업

▸ 방치․폐자전거 수거 및 재생자전거 생산	: 2018. 8. ~ 11.

▸ 재생자전거 기증(저소득층 등)	: 2018. 10.

◦ 웅포 곰개나루 대여소 운영	: 2018. 9. ~ 11.

9		전국체전 대비 주요 간선도로변 벽화 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 주요 간선도로 환경정비 담장 및 옹벽 13개소

▸이리북초등학교 담장, 구이리남중학교 옹벽, 국민생활관 앞 가설담장, 영등제일4차 주변 옹벽, 미륵사지로 일원 담장 등

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 9.

◦ 사 업 비 : 332백만원

◦ 사업내용 : 담장 벽화 및 옹벽 타일벽화 제작‧시공 등

□ 상반기 추진실적

◦ 환경정비 대상 선정 및 협조요청(전국체전담당관)	: 2017. 8.

◦ 성화봉송구간 및 경기장 주변 대상지 추가 검토	: 2018. 3. ~ 5.

▸모현초등학교 후문 옆 옹벽 외 8개소

◦ 일부구간(3개소) 자원봉사단체 참여 벽화 시공	: 2018. 5. 26.

▸자원봉사단체 :  희망연대, 원광대 벽화봉사동아리, 원광예술정보고등학교

- 이리공고 후문 옆 옹벽 외 2개소 벽화조성 참여 시민 200여명 참여

◦ 공공디자인위원회 심의	: 2018. 6. 19.

□ 하반기 추진계획

◦ 잔여 10개소 사업추진	: 2018. 7. ~ 9.