건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 상반기 성과 및 반성
□	2018 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충 환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공 장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여 도로확포장으로지역간소통원활및통행불편해소 생태하천정비로생활환경개선및주민편익도모 조명시설설치로보행환경개선및야간통행불편해소

일  반  현  황

□ 기       구

					건 설 과
건설행정				도로시설			하천시설					하천관리					가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	22		1	5	11	3	2
현 원	23		1	8	9	1	4
증 감	1			3	△2	△2	2

□ 사 무 분 장

◦ 건설행정 : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상 및 소송업무

◦ 도로시설 : 철도건널목 개량사업, 고속국도

, 국도, 지방도 등 사업관련 협의  시·군도, 농어촌도로 확·포장사업 추진

◦ 하천시설 : 하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦ 하천관리 : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과,

생태하천관리

◦가로등관리 : 가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	153.779	169.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	27.169	75.034	27%

□ 하 천 점 용 허 가  현황(2018년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	농작물 경 작	공공목적 (관로매설등)	기 타 (대지·진입로등)	계	농작물 경 작	공공목적 (관로매설등)	기 타 (대지·진입로등)
621	490	65	66	317,039	253,394	47,149	16,496

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
28,295등	18,978등	9,317등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2018 예산집행실적

【 2018. 6. 15. 현재 】                                         (단위: 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				38,648,732	10,573,775	28,074,957	27
	도로시설관리			21,838,976	8,062,108	13,776,868	37
		시·군도농어촌도로확·포장		12,241,777	1,188,717	11,053,060	10
			용동 삼정-두무간 도로확·포장	1,182,357	222,097	960,260	19	명시, 사고
			망성신성~관산간도로확·포장	492,856	0	492,856	0
			오산장신~만석간도로확·포장	700,000	109,986	590,014	16	명시
			왕궁온수~시대간(황암~상발)도로확포장공사	320,000	2,310	317,690	1
			춘포토다리-덕동간도로확포장공사	300,000	0	300,000	0
			미불용지매입비 (시군농어촌도로)	232,352	31,572	200,780	14	명시
			용안창리법성간 도로확·포장	730,000	59,550	670,450	8	명시
			함라칠성~다은간도로확포장공사	500,000	0	500,000	0
			망성군도10호금지간도로확포장공사	500,000	0	500,000	0
			금마누동~신촌간도로확포장공사	92,772	19,840	72,932	21	명시
			시군농어촌도로확포장사업추진	7,000	3,340	3,660	48
			군도23호선도로·확포장	6,185,746	600,494	5,585,252	10	명시
			오산외용(외검산)도로확포장공사	368,694	92,102	276,592	25	명시
			용동흥암마을진입로확포장공사	370,000	22,385	347,615	6
			군도8호선잔여(병목)구간도로확포장	110,000	25,041	84,959	23
			어양동어곳~부평간도로확포장	150,000	0	150,000	0
		주민숙원사업		38,960	19,484	19,476	50
			국내여비	37,960	18,982	18,978	50
			시책추진업무추진비	1,000	502	498	50

부서	정책	단위		세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		철도건널목개량사업			5,700,494	4,627,792	1,072,702	81
				평화육교재가설	5,457,345	4,627,792	829,553	85	사고
				국도23호 오산 교차로 램프설치	243,149	0	243,149	0	명시
		교통관리개선사업			350,000	286,319	63,681	82
				낭산석천삼거리도로구조개선	350,000	286,319	63,681	82	명시
		도로조명시설관리			3,507,745	1,939,796	1,567,949	55
			보안등신규설치		282,000	177,262	104,738	63
			노후가로등정비		933,640	470,003	463,637	50	명시
			가로등,보안등 유지관리		2,236,430	1,281,649	954,781	57
			가로등보수차량 운영유지비		18,675	9,430	9,245	50
			주민편익증진사업(가로등.보안등설치)보조		37,000	1,452	35,548	4	명시
	하천정비				16,737,714	2,485,512	14,252,202	15
		하천정비 및 유지관리			16,737,714	2,485,512	14,252,202	15
			하천제방유지보수		1,209,294	523,429	685,865	43	명시
			하천제방유지보수(자체)		546,224	181,109	365,115	33	명시
			소하천정비(생활)		3,189,663	327,944	2,861,719	10	명시
			국가하천유지관리(4대강)		807,882	268,548	539,334	33	명시
			지방하천정비 (왕궁천,동명천)		8,529,688	1,032,697	7,496,991	12	계속비
			만경강물문화관진입도로개설공사		1,300,000	0	1,300,000	0	명시
			지방하천정비		40,000	0	40,000	0	명시
			국가하천유지보수 (4대강외)		294,963	52,209	242,754	18	명시
			하천관리및유지관리 (해지천)		500,000	9,876	490,124	2	명시
			소하천정비(동산천)		320,000	89,700	230,300	28
	행정운영경비				72,042	26,155	45,887	36
			인력운영비		40,000	8,529	31,471	21
			기본경비		32,042	17,626	14,416	55

2018년 상반기 성과

□ 성      과

◦ 건설공사 편입용지 협의보상으로 공익사업 추진에 기여

▸ 보상계획 : 55개노선 3,091필지 810,490㎡

▸ 보상실적 : 55개노선 1,994필지 548,634 ㎡

◦ 농어촌도로 확포장 및 교통관리 개선사업으로 차량통행 불편해소와   기계화 영농기반 구축으로 주민  편익 증대

▸ 낭산 석천삼거리 도로구조개선 회전교차로 설치공사

- 회전교차로 설치

- 공사 완료

▸ 용동 삼정~두무간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.21㎞, B=7.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 62%

▸ 군도 8호선 병목구간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.09㎞, B=8.0m

- 공사완료

▸ 군도 23호선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=3.50㎞, B=16.5-20.5m (2차로→4차로)

- 도로확포장 공사 착공 : 2018. 05. 28.

▸ 오산 외검선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.8㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 30%

◦ 평화육교를 재가설하여 호남선 KTX 완전개통과 안전한 교통망 구축

▸ 대체우회도로 설치(L=1.1㎞, 4차로), 편입 토지 및 지장물 협의매수

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천정비로 재해  예방 및 시민 친수 공간 조성

◦ 대판천 소하천정비사업 공사 발주(18.05.14.) : 공정율 10%

◦ 하천정비사업 편입토지 보상 협의 중

▸ 왕궁천 : 60%(196,130㎡ 중 111,018㎡)

◦ 도로조명설치로 밝은거리 조성하여 여성,노약자 등에게 안전한 보행 도모

▸ 노후가로등정비 297개소,  보안등 설치 243개소

▸ 가로등,보안등 민원처리  1,959건

□ 반      성

◦ 도시 관리 계획 변경 · 결정 등 행정절차 진행중으로 만경강 문화관 토지

보상 매입이 지연되고 있어 익산지방국토관리청과 협조체계를 구축하여

조속히 추진토록 노력 필요

2 0 18년  주 요 업 무

		공익사업을 위한 용지보상 군도23호선 도로 확포장 평화육교 재가설 시·군도 및 농어촌도로 확·포장 왕궁천 하천환경 정비사업 동명천 하천환경 정비사업 소하천정비사업(대판천,동산천) 만경강 문화관 조성사업 도로조명 개선

1		공익사업을 위한 용지보상

□ 사 업 개 요

◦ 현     황                                     (6월15일 현재)

구분	보상대상			보상실적				미보상 용지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	55	3,091	810,490	55	1,994	548,634	68%	55	1,097	261,856
도시재생과	29	615	100,364	29	392	58,740	59%	29	223	41,624
건 설 과	20	1,862	498,692	20	1,056	288,193	58%	20	806	210,499
도로공원과	2	46	9,121	2	31	7,319	80%	2	15	1,802
시민안전과	3	62	9,397	3	39	6,341	67%	3	23	3,056
타 기 관	1	506	192,916	1	476	188,041	97%	1	30	4,875

□ 상반기 추진실적

◦ 보상계획 : 55개노선 3,091필지 810,490㎡

◦ 보상실적 : 55개노선 1,994필지 548,634㎡

□ 하반기 추진계획

◦ 보상계획 : 55개노선 1,097필지  261,856㎡

▸독려반 2개반 4명 편성 운영하여 적극적인 보상업무 추진

▸협의기간 내 미협의자 개별방문 및 면담으로 집중 독려

▸해당 사업자별 현지(읍․면․동) 출장 보상협의 및 계약체결

▸소액보상자, 노약자, 장애인 등 현지방문 보상민원 처리

▸원거리거주자(서울,경기등)왕복 우편이용 보상협의계약 대행처리

2		군도 23호선 도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 01 ~ 2019. 12

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=20m (2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 125억원(공사비 90, 보상비 31, 기타 4)

□ 상반기 추진실적

◦ 토지 및 지장물 손실보상	: 2016. 6. ~ 현재

▸총 248필지 51,900㎡ 중 152필지 35,860㎡ 협의매수 (69%)

◦ 공사 발주	: 2018. 2.

◦ 공사 착공	: 2018. 5. 28.

□ 하반기 추진계획

◦ 편입토지, 지장물 협의매수 및 수용재결	: 2018. 7. ~ 12.

◦ 공사 추진	: 2018. 7. ~ 2019. 12.

3		평화육교 재가설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2020.  6

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m(4차로 ⇒ 6차로)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 익산시 190)

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

□ 상반기 추진실적

◦ 편입 토지 및 지장물 협의매수	: 2018. 1. ~ 현재

◦ 대체우회도로 설치(90%)	: 2018. 3. ~ 현재

※ 전체공정율 10.5%

□ 하반기 추진계획

◦ 육교 철거(전면통제 2018. 7. ~ 2019. 12.)	: 2018. 7. ~ 12.

◦ 육교 재가설	: 2019. 1. ~ 12.

◦ 사업 완료	: 2020. 6.

4		시·군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산, 용동, 망성, 금마, 왕궁, 용안면 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2020.

◦ 사업규모 : L= 8.44km, B= 7.0 ~ 20.0m

◦ 총사업비 : 6,410백만원 (15개사업, 본예산 3,880, 이월예산 2,330,

1회추경전 200)

▸ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사	:  493백만원

- L=0.91km, B=7.0m                   (본 300, 명 193)

▸ 용안 창리~법성간 도로확·포장공사	:  730백만원

- L=0.84km, B=8.0m                   (본 530, 명 200)

▸ 국도23호 오산교차로 진입램프 설치공사	:  243백만원

- L=0.29km, B=8.0m                          (명 243)

▸ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사	: 1,182백만원

- L=1.21km, B=7.0m                   (명 905, 사 277)

▸ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사	:  369백만원

- L=0.80km, B=8.0m                    (본 300, 명 69)

▸ 함라 칠성~다은간 도로확.포장공사	:  500백만원

- L=1.00km, B=8.0m                         (본 500)

▸ 망성 군도10호~금지간 도로확·포장공사	:  500백만원

- L=1.20km, B=8.0m                         (본 500)

▸ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사	:  370백만원

- L=0.30km, B=6.0m                         (본 370)

▸ 낭산 석천삼거리 도로구조개선사업	:  350백만원

- 3지 회전교차로 1개소               (명 150, 1회추경전 200)

▸ 오산 장신~만석간 도로확·포장공사	:  700백만원

- L=1.61km, B=8.0m                    (본 500 명 200)

▸ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사	:   93백만원

- L=0.93km, B=7.0m                          (명 93)

▸ 왕궁 온수~시대간 도로확·포장공사	:  320백만원

- L=3.00km, B=8.0m                          (본 320)

▸ 춘포 토다리~덕동간 도로확·포장공사	:  300백만원

- L=1.00km, B=8.0m                          (본 300)

▸ 어양동 어곳~부평간 도로확·포장공사	:  150백만원

- L=0.80km, B=8.0m                          (본 150)

▸ 군도8호선 잔여(병목)구간 확·포장공사	:  110백만원

- L=0.10km, B=8.0m                         (본 110)

□ 상반기 추진실적

◦ 망성 신성~관산간 도로 확·포장공사

▸ 실시설계 용역 추진	: 2018. 5. ~ 6.

◦ 용안 창리~법성간 도로 확·포장공사

▸ 실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2017. 7. ~2018. 2.

▸ 행정절차 이행	: 2018. 3. ~2018. 6.

◦ 국도23호 오산교차로 진입램프 설치공사

▸ 공사 추진	: 2018. 3. ~ 2018. 6.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸ 2, 3차분 공사 추진(배수공, 구조물공 등) : 2018. 5. ~ 12.

◦ 오산 외용(외검선) 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2018. 2. ~ 2018. 6.

▸ 공사 추진	: 2018. 3. ~ 2018. 6.

◦ 함라 칠성~다은간 도로 확·포장공사

▸ 실시설계 및 환경영향평가 용역 추진     : 2018. 1. ~ 6.

◦ 망성 군도10호~금지간 도로 확·포장공사

▸ 실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018. 1. ~ 6.

◦ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사

▸ 실시설계 용역 추진	: 2018. 1. ~ 3.

▸ 행정절차 이행	: 2018. 4. ~2018. 6.

◦ 낭산 석천삼거리 도로 구조개선사업

▸ 공사 완료	: 2018. 6.

◦ 오산 장신~만석간 도로 확·포장공사

▸ 행정절차 이행	: 2018. 4. ~ 6.

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 5. ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2018. 4. ~ 2019. 4.

◦ 금마 누동~신촌간 도로 확·포장공사

▸ 환경영향평가 용역 추진	: 2017. 10. ~2018. 2.

▸ 문화재 지표조사	: 2018. 3. ~ 4.

▸ 행정절차 이행	: 2018. 4. ~ 5.

▸ 공사 추진	: 2019. 3 ~ 12.

◦ 왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사

▸ 설계 재검토 및 행정절차 이행	: 2018. 5. ~ 12.

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 5. ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2018. 10. ~ 2019. 12.

◦ 춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사

▸ 실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018. 1. ~ 6.

▸ 행정절차 이행	: 2018. 5. ~ 6.

◦ 어양동 어곳~부평간 도로 확·포장공사

▸ 설계용역 추진	: 2018. 1. ~ 6.

▸ 행정절차 이행	: 2018. 5. ~ 6.

◦ 군도8호선 잔여(병목)구간 확·포장공사

▸ 설계용역 추진	: 2018. 1. ~ 2.

▸ 공사 추진	: 2018. 3. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 망성 신성~관산간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 7. ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2018. 10. ~2019. 12.

◦ 용안 창리~법성간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 7. ~ 2018. 12.

▸ 공사 추진	: 2018. 10. ~2019. 12.

◦ 국도23호 오산교차로 진입램프 설치공사

▸ 공사 추진	: 2018. 7. ~2018. 8.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸ 2, 3차분 공사 추진(구조물공, 포장공)	: 2018. 5. ~ 12.

▸ 공사 준공	: 2018. 12.

◦ 오산 외용(외검선) 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2018. 7. ~2018. 10.

▸ 공사 추진	: 2018. 7. ~2018. 11.

◦ 함라 칠성~다은간 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2018. 8. ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2018. 10. ~ 2019. 12

◦ 망성 군도10호~금지간 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2018. 8. ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2018. 10. ~2019. 12.

◦ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사

▸ 용지 보상	: 2018. 7. ~ 10.

▸ 공사 추진	: 2018. 9. ~2018. 12.

◦ 오산 장신~만석간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 7. ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2018. 7 ~ 2019. 4.

◦ 금마 누동~신촌간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 7. ~ 12.

▸ 공사 추진	: 2019. 3. ~ 12.

◦ 왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 7. ~ 12.

▸ 설계 재검토 및 행정절차 이행	: 2019. 2. ~ 6.

▸ 공사 추진	: 2019. 7. ~ 2020. 12.

◦ 춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 7. ~ 2019. 5

▸ 공사 추진	: 2019. 5. ~ 2019. 12.

◦ 어양동 어곳~부평간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 7. ~ 2019. 12.

▸ 공사 추진	: 2019. 10. ~ 2020. 12.

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2018년 예산액	금후 투자
	23개사업	L=24.76km B=5-8m	35,458	7,898	4,080	23,480
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	506	300	559	용지 68%	망성 303 (신선선)
2	국도23호 오산교차로 진입램프설치공사	L=0.29km B=5.0m	333	333			공정율 5%
3	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	1,847			공정율 55%	용동 204 (삼두선)
4	용동 흥왕마을 진입로 도로확.포장	L=0.3km B=6.0m	370		370
5	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	505		906	용지 56%	금마 102 (누부선)
6	오산 외용(외검)선 도로확.포장	L=0.80km B=8.0m	1,000	217	300	483	용지 83%	오산 201 (외검선)
7	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
8	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
9	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	974	474	500		용지 87%	오산 301 (용연선)	군도 1호
10	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
11	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190	500	285	용지 85%	함라 201 (진다선)
12	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180	500	1,192	용지 66%	군도 10호
13	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
16	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
17	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296	320	2,187	용지 57%	군도 21호
18	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127	300	1,793	용지 9%	춘포 103 (신화선)
19	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	230	530	86	설계완료	용안 203 (자석선)
20	삼기 석라선 도로.확포장	L=1.00km B=8.0m	1,400			1,400		삼기 203 (석라선)
21	낭산 석천삼거리 도로구조개선	회전교차로 1개소	350	150	200		공정율 100%	군도 13호	지방도 724호
22	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m	1,900		150	1,750
23	군도8호선 병목구간 도로확.포장	L=0.1km B=8.0m	110		110			군도 8호

5		왕궁천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리~춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 :  2015. ~ 2019.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25km

◦ 총사업비 : 24,720백만원(국비 12,360, 도비 4,944, 시비 7,416)

▸2018년 예산 확보액 – 5,000백만원

◦ 사업내용 : 하천정비 L=9.25km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 상반기 추진실적

◦ 편입토지 보상협의(보상율 60%)	: 2017. 8. ~ 현재

◦ 건설기술심의(전북도)	: 2018. 3. 16.

◦ 경관심의/공공디자인심의	: 2018. 4. 30.

◦ 총사업비 변경(247 → 470억원)협의 중(익산국토관리청)	: 2018. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 원가심사(전북도)	: 2018. 7.

◦ 하천공사 시행계획 고시	: 2018. 8.

◦ 공사 발주	: 2018. 9.

◦ 공사 추진(하천기본계획 확정 고시 후)	: 2018. 9.

6		동면천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리~왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 :  2017. ~ 2020.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05km

◦ 총사업비 : 15,480백만원(국비 7,740, 도비 3,096, 시비 4,644)

▸2018년 예산 확보액 – 1,000백만원

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계 1차 협의(익산국토관리청)	: 2018.  2. ~ 6.

◦ 주민설명회	: 2018.  4.

◦ 실시설계 사전 협의(전북도)	: 2018.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 설계경제성 검토(VE) 용역 발주	: 2018.  7.

◦ 실시설계 2차 협의(익산국토관리청)	: 2018.  9.

◦ 설계적정성 검토(조달청)	: 2018. 10.

◦ 건설기술심의(전북도)	: 2018. 11.

◦ 총사업비 협의	: 2018. 12.

◦ 하천공사 시행계획 고시	: 2019.  1.

◦ 공사 발주	: 2019.  1.

7		소하천정비사업(대판천,동산천)

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
대판천 소하천정비사업	삼기면 연동리 일원	2017. ~ 2019.	3,057(국 1,528 시 1,529) ▸2018년 : 1,240	소하천정비 L=1.253km
동산천 소하천정비사업	웅포면 맹산리 일원	2018. ~ 2020.	2,700 (국 1,350 시 1,350) ▸2018년 : 320	소하천정비 L=1.018km

□ 상반기 추진실적

◦ 대판천 설계심의(익산시) 및 원가심사	: 2018. 2.

◦ 동산천 실시설계 용역 착수	: 2018. 2. 28.

◦ 대판천 편입토지 보상 협의(40%)	: 2018. 4.

◦ 대판천 사업시행 공고	: 2018. 4. 12.

◦ 동산천 주민설명회	: 2018. 4. 19.

◦ 대판천 공사 착수(공정률 : 10%)	: 2018. 5. 14.

□ 하반기 추진계획

◦ 동산천 사전설계검토(전북도)	: 2018. 8.

◦ 동산천 원가심사(전북도) 및 설계심의(시)의뢰	: 2018. 11.

◦ 동산천 시행계획 수립 공고	: 2018. 12.

◦ 동산천 공사 발주	: 2019. 1.

◦ 대판천 공사 완료	: 2019. 9.

8		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 12필지

◦ 사업기간 : 2015. 09. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 113억원(국비 100억, 시비 13억 토지매입비)

◦ 사업개요 : 11,555㎡(지하 1층 지상2층)/연면적 1,686㎡)

▸시설 현황 : 다목적실, 로비, 사무실 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청

□ 상반기 추진실적

◦ 만경강 문화관 건립에 따른 TF팀 구성 및 운영(2회)	: 2018. 2.~ 3.

▸익산국토청 4명, 익산시 2명, 김제시 2명

◦ 도시관리계획 결정(변경) 요청(익산시 도시재생과)	: 2018. 4. 16.

□ 하반기 추진계획

◦ 감정 평가 및 용지보상 실시(익산시)	: 2018. 7. ~

◦ 공사 발주 및 추진(익산지방국토관리청)	: 2018. 10. ~2020. 12.

9		도로조명 개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

◦ 사업예산 : 1,131,640천원

◦ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행불편지역 도로조명 보수 및 설치

▸사업내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		10개 사업	1,131,640
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등신규설치 268개소	114,000
	주민숙원사업외 보안등설치	LED가로등교체 29개소	166,000
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비 90개소	90,000
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 50개소	50,000
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	74,040
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	35,100
	전기안전점검부적합보수단가	부적합 가로등 보수	30,000
	도시지역노후가로등 LED교체공사	가로등LED교체	350,000
	가로등 디밍(조도조절) 시스템 설치공사	LED교체및조도조절기설치	200,000

□ 상반기 추진실적	: 17개사업 완료(639,547천원)

◦ 보안등 신규설치공사 7개사업	: 200,842천원

◦ 도심지역 가로등 유지보수(1차)외 9개사업	: 438,705천원

□ 하반기 추진계획

◦ 하반기 보안등 신규설치 공사 추진	: 2018. 7. ~ 12.

◦ 노후가로등(보안등) 유지보수 및 잔여공사 추진	: 2018. 7. ~ 12.