상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 상반기 성과 및 반성
□	2018 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정  ․  현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	42	1	1	9	13	11	5	2
현 원	40	1	1	9	23	3	1	2
증 감	△2				10	△8	△4

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 5, 여 5

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	300,187	297,033	98.9
도심권	237,138	236,885	99.9
읍면권	63,049	60,148	95.4

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
계		230,300	153,072
생 활 용 수	소 계	195,300	131,910	100%
	광 역	105,300	61,141	46%
	자 체	90,000	70,769	54%
공 업 용 수	자 체	35,000	21,162

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	62,065	2,584,753	100.0
가 정 용	47,665	1,266,997	49.0
일 반 용	13,639	458,832	17.8
산 업 용	625	288,290	11.2
대중탕용	42	17,524	0.7
전용공업용	94	553,110	21.3

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,878.9	2.5	25.3	1,170.5	680.6

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	6	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2018 예산집행실적

【 2018. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				33,040,130	13,390,841	19,649,289	40.5
	상수도사업비용			25,569,669	11,568,097	14,001,572	45.2
		영업비용		24,390,374	11,568,097	12,822,277	47.4
			원수 및 취수비	13,611,235	6,688,706	6,922,529	49.1
			정수비	2,634,870	1,175,439	1,459,431	44.6
			배·급수비	137,953	68,985	68,968	50.0
			급·배수공사비	1,175,798	581,388	594,410	49.4
			일반관리비	4,872,771	2,189,869	2,682,902	44.9
			징수 및 수용가관리비	1,957,747	863,710	1,094,037	44.1
		예비비		1,179,295	-	1,179,295	-
	자본적지출			7,470,461	1,822,744	5,647,717	24.4
		유형자산취득		6,164,368	1,822,744	4,341,624	29.6
			구축물	5,677,531	1,721,519	3,956,012	30.3
			기계장치	448,118	79,574	368,544	17.8
			공기구비품	38,719	21,651	17,068	55.9
		예비비		1,306,093	-	1,306,093	-

2018 상반기 성과 및 반성

□ 성        과

◦ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

‣ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 9개소 4.1㎞/322개소

‣ 관내 변류정비 및 교체 60개소

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수구역 확장공사 추진(가압장) :  3개소

‣ 배·급수관 개선공사 추진     : 82개소 5.2km

◦ 효율적 검침 및 부과·징수로 경영 효율화 제고

‣ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 계량기 조사원 교육 6회

‣ 대구경 월트만 계량기 전자식 수도미터기로 전환 : 15개소 15전

※ 75㎜이상 계량기 중 내용년수 6년이 경과, 고장, 동파계량기 대상

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 동파 계량기 교체 :  748건

‣ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 40건/700건

‣ 상수관 부설도로 노면정비 : 36개소 8.0km

□ 반        성

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

‣ 시민부담을 고려하여 점진적 수도요금 인상으로 현실화 추진

‣ 년도별 현실화율 현황(2014년 83.61%, 2015년 78.78%, 2016년 80.93%, 2017년 76.29%)

2018 주요업무 추진상황

		상수도관망 최적화사업
		급수구역확장 및 급배수관 민원공사
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급
		상수도요금 고액체납자 행정조치 강화
		수도정비기본계획 및 배수지확충 기본및실시설계용역
	□	석불사거리∼낭산사거리간 배수관 부설공사

1		상수도관망 최적화 사업

ᷮ 사 업 개 요

◦유수율 제고사업

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			5,000
블록시스템구축	현영동, 부송동, 어양동 모현동, 신동, 송학동 등	14개소	3,200
노후관 교체	남중동 일원	4.1km	1,200
긴급 누수처 복구	관내 일원	800개소	400
변류 정비공사	〃	200개소	200

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 노후관 교체공사

▸상공회의소사거리~KCC석고보드등 9개 노후관교체공사 추진(공정률: 76%)

◦ 누수처 복구 : 함낭로 289등 322개소 복구완료

◦ 변류 정비   : 선화로1길 58-25등 60개소 불량 변류(제수변, 소화전 등) 교체

□ 하반기 추진계획

◦ 블록시스템 추진(PB01~PB12,19,20블록, 14블록) -- 2018. 7. ~ 2018. 11.

◦ 긴급 누수처 복구 공사 ----------------- 누수처 발생시(연중시행)

◦ 변류 정비공사 ----------------------- 불량변류 발생시(연중시행)

2		급수구역 확장 및 급·배수관 민원공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			1,397
급수구역 확장공사	함라면 수동마을	가압장1개소	50
	여산면 금곡마을	가압장1개소	50
	금마면 신정마을	1.2km	96
	부송동 화물터미널뒤	가압장1개소	60
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	9.5km	641
급·배수관 민원공사	익산시 일원	8.0km	500

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 가압장설치(함라면 수동, 여산면 금곡, 부송동 화물터미널뒤) 완료 : 2018. 4

◦ 상수도부설도로 노면정비공사 완료(8.0㎞) : 2018. 5

◦ 급배수관민원공사(5.2㎞) 완료 : 2018. 5

ᷮ 문제점 및 대책

◦ 금마면 신정마을 배수관부설공사구간 사유토지의 사용승락 미징취

◦ 흥일농장의 공사소음으로 인한 모돈의 유산위험성 주장하며 피해발생시 보상요청 민원제기

□ 하반기 추진계획

◦ 급수구역 확장 및 상수도 부설도로 노면정비 공사

▸ 현지조사 및 설계 ------------------------------ 2018. 7 ~ 8

▸ 공  사  기  간  -----------------------------  2018. 9 ~ 12

◦ 급·배수관 공사

▸ 수압저조로 인한 급수불출 민원 발생시 -------------- 연중시행

3		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 현      황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
소 계	195,300	131,910	100%
광역상수도	105,300	61,141	46%
자체정수	90,000	70,769	54%

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 정수장 안전점검 및 시설물 보수·보강을 통한 위생적, 효율적 운영관리

▸ 정밀점검 및 내진성능평가 용역 착수(기간 : 2018.4.26. ~ 2018.11.22.)

▸ 유해화학물질 장외영향평가 용역 착수(기간 : 2018.3.19. ~ 2018.7.16.)

▸ 국가안전대진단에 따른 자체 안전점검 3회 실시

▸ 시설물 보수·보강공사 등 26개 사업/187백만원 완료

▸ 정·배수지 및 침전지 청소, 수목정리 및 예초 각 1회 실시

◦ 수질검사 강화로 수질기준에 적합한 수돗물 생산・공급

구 분	법정기준	수질검사 강화
원 수	․월간 : pH 등 6개 항목 ․분기 : 질산성질소 등 26개 항목	․일일 : pH 등 4개 항목 ․주간 : 대장균군 등 6개 항목 ․분기 : 질산성질소 등 26개 항목
정 수	․일일 : pH 등 6개 항목 ․주간 : 일반세균 등 7개 항목 ․월간 : 수은 등 59개 항목 ․분기 : 염화비닐 등 23개 항목	․일일 : pH 등 7개 항목(2회) ․주간 : 일반세균 등 7개 항목(2회) ․월간 : 수은 등 59개 항목 ․분기 : 염화비닐 등 23개 항목

◦ 수돗물 안전홍보 품질보고서 배부  : 50,000부

□ 하반기 추진계획

◦ 정수시설물 보수·보강 및 정·배수지 환경정비 등 : 6개사업 286백만원

▸ 배수지(6개소 18지), 침전지(2개소 8지) 청소 ----- 연         중

▸ 정·배수지 환경정비   -------------------------- 연         중

▸ 금강정수장 여과지 조작대 보수공사  -----------  2018. 07 ~ 09

▸ 신흥정수장 활성탄 투입기 교체 및 보수  -------  2018. 07 ~ 11

▸ 정수장 응집제 자동투입시스템 설치공사 --------  2018. 07 ~ 09

▸ 신흥정수장 진공차단기 교체공사 ---------------  2018. 07 ~ 10

◦ 수돗물 수질검사 강화 지속실시

◦ 수돗물 신뢰제고 신흥정수장 개방(시민, 단체, 학교, 어린이집 등)	: 연중

◦ 수돗물평가위원회 개최	: 년 2회

4		상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화

□ 사 업 개 요

◦ 수전현황

(단위 : 전)

합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용	전용공업용
62,065	47,665	13,639	42	625	94

◦  2018년 상수도요금 부과․징수 (‘18. 6. 15 기준 )

□ 2018년 요금 부과 및 징수 목표액  : 13,107백만원/12,976백만원 (99.0%)

◦ 체납액 현황

(‘18. 6. 15.기준)

계	현년도 부과분	과년도 부과분
396,927천원	276,232천원	120,695천원

□ 상반기 추진실적

◦ 정확한 요금 부과를 위한 수도 검침원 교육 : 6회

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수반 편성운영(2개반)

□ 전화, 방문 체납 독려 및 단수 조치(147건)

□ 30만원 이상, 3회이상 체납자 압류예고문 발송 : 200건/177,421천원

◦ 수도계량기 검침원(50명)담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

□ 2회 체납 수용가 체납수도요금 납부안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

□ 하반기 추진계획

◦ 수도 검침원 친절 및 직무교육 실시 : 월 1회 이상

◦ 징수율제고를 위한 체납징수 활동 강화

□ 상습체납자에 대한 강력한 행정조치 : 토지 및 건물 등 재산압류 등

5		수도정비기본계획 및 배수지확충기본 및 실시설계 용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역개요  : V=8,200㎥

◦ 용역기간  : 2017. 5. 11 ~ 2018. 11. 1 (18개월)

◦ 용 역 비  : 658,040천원(시비)

◦ 용역내용  : 기본 및 실시설계 1식

▸배수지(V=8,200㎥), 송수가압장, 송․배수관로 L=2.0km(D450~500mm)

▸행정절차 이행(도시계획시설결정, 교통성 검토, 사전재해영향성 검토 등)

▸용지도 및 용지보상조서 작성

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인요청   : 2018.  3월

◦ 금마배수지 확장부지 지반조사실시        : 2018.  4월 ~ 5월

◦ 금마배수지 확장공사 설계서작성 및 검토  : 2018.  4월 ~ 6월

□ 하반기 추진계획

◦ 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인완료  : 2018.  7월

◦ 배수지확충 기본설계 완료                : 2018.  7월

◦ 배수지확충 실시설계 완료                : 2018.  9월

◦ 용 역 준 공                             : 2018. 11월

6		석불사거리~낭산사거리간 배수관부설공사

□ 공 사 개 요

◦ 위    치  : 익산시 삼기면, 낭산면 일원

◦ 공사개요  : 배수관부설 D400mm L=6,380m

◦ 공사기간  : 2018. 1. 15 ~ 2018. 7. 13 (6개월)

◦ 공 사 비  : 3,500,000천원(시비)

◦ 공사내용

▸토  공 : 터파기 8,694㎥ 되메우기 5,784㎥ 사토 2,084㎥

▸관로공 : 주철관부설(D400mm) L=6,380m, 제수변실 15개소,

이토변실 5개소, 공기변실 7개소

▸포장공 : 아스콘포장(표층 10,369㎡, 기층 6,319㎡) 콘크리트포장 A=50㎡

▸부대공 : 1식

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 배수관 부설완료                          : 2018.  6월