하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 상반기 성과 및 반성
□	2018 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전

일  반  현  황

□ 기          구

							하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리				지하수			폐수처리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	31	1	9	5	7	9
현 원	29	1	9	10	6	3
증 감	▵2			5	▵1	▵6

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 오산 문화마을 하수관거 정비사업, 남부2·3, 북부2 하수관거 정비사업, 함열지구 분류식 관거 정비사업, 유천 생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 마을하수처리시설 운영 및 유지관리, 하수중계펌프장 운영 및 유지관리, CSOs 운영 및 유지관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과
◦	폐수처리 :	공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영관리, 산업단지 폐수 유입 승인, 배수설비 신고, 비용부담금 부과징수 등

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2018. 6.	비 고
시설	총인구	천명	300
	하수인구	천명	269
	보급률	%	89.7
하수처리	1일평균하수발생량	톤	115,375
	1일평균하수처리량	톤	113,436
	하수처리율	%	98.3
하수도 사용	개소수	전	39,422
	톤당 평균요금	원	556.5	2017년 기준

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	28	145,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
제3일반산업단지 공동폐수처리시설	1	5,500㎥/일	직영

2018 예산집행실적

【 2018. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
하수도과				64,311,736	29,501,182	34,810,554	45.8
	하수도사업비용			34,246,254	26,068,765	8,177,489	76.1
		영업비용		33,983,308	26,067,804	7,915,504	76.7
			관거비	15,509,973	12,771,321	2,738,652	82.3
			펌프장비	377,209	110,860	266,349	29.3
			처리장비	14,692,024	11,805,079	2,886,945	80.3
			일반관리비	3,404,102	1,380,544	2,023,558	40.5
		영업외비용		2,800	961	1,839	34.3
			차입금이자상환	2,800	961	1,839	34.3
		예비비		260,146	0	260,146	0
				260,146	0	260,146	0
			예비비
	자본적지출			30,065,482	3,432,417	26,633,065	11.4
		유형자산취득		29,294,429	3,388,117	25,906,312	11.5
			구축물	28,693,472	3,189,991	25,503,481	11.1
			기계장치	342,657	134,831	207,826	39.3
			공기구비품	8,300	8,248	52	99.3
			건설중인자산	250,000	55,047	194,953	22.0
		비가동설비자산취득		343,853	0	343,853	0
				343,853	0	343,853	0
			건설중인자산
		비유동부채상환		177,200	44,300	132,900	25.0
			정부차입금원금상환	177,200	44,300	132,900	25.0
		예비비		250,000	0	250,000	0
			예비비	250,000	0	250,000	0

2018 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 오·우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

‣ 오산 문화마을 하수관거 정비공사 추진 : 관거정비 5.4km, 배수설비 91개소

‣ 황등1처리분구 하수관거 정비공사 추진 : 관거정비 0.6km, 배수설비 19개소

‣ 금마3처리분구 하수관거 정비공사 추진 : 관거정비 1.0km

◦ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

‣ 총27개소(139,561㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

‣ 하수처리시설 기능보강 추진으로 처리효율 향상 및 수질오염 저감

- 여산처리장 용수공급펌프 교체공사 외 8건

◦ 하수찌꺼기 감량화 사업 추진을 위한 공법선정 완료

‣ 기술제안서 경제성 검토 및 심의위원회 심의를 통한 최적 공법 선정

‣ 공법선정에 따른 찌꺼기 발생량 감소 및 유지관리비 절감 기대

◦ 읍·면·동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 하수도 정비 : 50건 2.5km, 하수도기계준설 : 6건 1,680㎥

‣ 하수생활민원 처리를 위한 직원 비상근무조 편성운영 : 839건

- 맨홀 및 하수도 준설 321건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차 조정 등 518건 실시

◦ 지하수 보조관측망 설치에 따른 체계적인 수질관리 시스템 마련

‣ 오산면 장신리 외 4개소 설치·운영 개시(’18년 현재 9개소 운영중)

□ 반      성

◦ 하수관거 공사에 따른 시민불편 초래

‣ 공사안내 현수막 게시 및 주민간담회 등을 통해 하수관거 공사 현장 홍보를 지속적으로 추진하였으나, 구간별 복구가 지연되는 곳이 발생하여 시민불편 초래

2018 주요업무 추진상황

		남부2·3, 북부2처리분구 하수관거 정비사업 오산문화마을 하수관거 정비사업 유천생태습지 유지관리 공공하수처리시설 운영관리 하수찌꺼기 감량화 사업 소규모 하수도 관련 주민숙원사업

1		남부2․3, 북부2처리분구 하수관거 정비사업 (인화동, 주현동, 동산동, /신흥동, 영등1동, 신용동)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 30,136백만원(국비 21,095, 도비 904, 시비 8,137)

▸ 2018년 : 11,775백만원(국비 8,242, 도비 353, 시비 3,180)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=28.0km, 배수설비 3,200가구

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	2017. 06. 19.

◦ 인화동 주민설명회 개최(2회)	2017. 11. 24, 2018. 2. 5.

◦ 동산동 주민설명회 개최(2회)	2017. 11. 28, 2018. 2. 5.

◦ 전북도 설계(안) 기술심의 및 보완	2018. 04. 17. ~ 05. 16.

※ 2018. 6월 현재 용역 공정율 : 90%

□ 하반기 추진계획

◦ 환경부 재원협의, 전북도 원가심사 등 행정절차 이행	2018. 07. ~ 08.

◦ 주민설명회 개최 (인화동, 동산동, 신동)	2018. 07. ~ 08.

◦ 실시설계용역 준공	2018. 08.

◦ 공사 발주	2018. 08. ~ 09.

◦ 공사 착공 및 준공	2018. 09. ~ 2020. 12.

2		오산문화마을 하수관거 정비사업 (오산면 신지리 옥포1·2, 광지, 월포마을 일원)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 오산면 신지리 옥포1·2, 광지, 월포마을 일원

◦ 사 업 량 : 오수관로 5.4km, 배수설비 87가구

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2018.

◦ 사 업 비 : 4,372백만원(국비3,060, 도비131, 시비1,181)

□ 위  치  도

마을하수처리장

(기존)

옥포마을

광지마을

월포마을

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 환경부 및 한국환경공단 재원협의 완료	2016. 06. 28.

◦ 전라북도 원가심사 완료	2016. 07. 10.

◦ 시설공사 착공	2017. 09. 15.

※ 2018. 6월 현재 공정율 : 95% (오수관로 5.4km 및 배수설비 91가구 완료)

ᷮ 하반기 추진계획

◦ 공사 준공	2018. 09.

◦ 하수도사용개시 및 국비정산 보고	2018. 09. ~ 2018. 12.

3		유천생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 시설규모 : 생태습지 A=134,521㎡, 생태하천 0.9km

◦ 사업내용 : 수질관리, 수목 및 잔디관리, 시설물 보강공사 등

◦ 사업기간 : 연 중

◦ 사 업 비 : 250백만원

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 유천생태습지 조경 유지관리공사 발주	2018. 01.

◦ 유지관리공사 추진	2018. 01.  ~ 2018. 12.

◦ 생태하천복원사업 모니터링 용역 추진	2018. 02.  ~ 2018. 12.

◦ 주민편익시설 보강 공사시행	2018. 02. ~ 2018. 05.

▸ 체험숲길 조성, 소공연장 기능보강, 파고라, 의자 등 편의시설 증설 등

ᷮ 하반기 추진계획

◦ 주민편익시설 추가 보강공사 시행	2018. 07. ~ 2018. 12.

▸ 조명등 설치 및 정비, 수목지지대 정비, 초화류 식재, 기타 시설물 관리 등

- 사 업 비  : 200백만원(시비)

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 사 업 개 요

◦ 공공하수처리시설 : 27개소

시설명	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	익산	북부	함열	금마	분뇨
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	88개소	100,000	30,000	6,000	1,100	150
운영방식	직 영		직영75 위탁13	위탁운영[(주)전북엔비텍BTO, 2008.~2028.]

◦ 직영 시설 관리인원 : 4명(전기운영2, 기계운영1, 열관리운영1)

◦ BTO위탁운영비 예산 : 135억원(도비 5.9억원 시비 129.1억원)

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 유입·방류수 법정 수질 준수(6개항목)

▸ 익산 외 4개소(일1회), 소규모(50톤 이상 주1회, 50톤 미만 월1회)

▸ 소규모하수도시설 및 중계펌프장 운영 관리 : 주1~2회 수시점검

◦ 공공하수처리시설 기능보강 실시 : 여산처리장 외 4개소 40,100천원

◦ 공공하수처리시설 법정 기술진단 실시 : 오산문화 외 1개소 21,120천원

◦ 공공하수처리시설 악취 기술진단 실시 : 북부하수 외 3개소 105,462천원

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 : 익산공공 외 4개소 1,760천원

ᷮ 하반기 추진계획

◦ BTO 위탁운영 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 : 32,680천원

◦ 하수처리시설 기술진단 개선공사 추진 : 여산하수 외 5개소 204,170천원

5		하수찌꺼기 감량화사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 21,020백만원 (국비 70%, 지방비 30%)

◦ 사업내용 : 개량공사 1식, 증설공사 1식

▸ 개량공사 : 스팀방식 변경, 드럼스크린 교체, 탈취커버, 가스저장탱크 교체 등

▸ 증설공사 : 소화조(5,000㎥/일), 소화가스 활용 발전설비, 탈취시설, 농축시설

ᷮ 상반기 추진실적

◦ ‘18년도 예산 : 1,429백만원(국비1,000 도비108 시비321)

◦ 기초 현장조사	2018. 01. ~ 04.

◦ 타 지자체 감량화시설 견학 (6개소)	2018. 03.

◦ 공법선정 기술제안서 제출 공고	2018. 04.

◦ 공법선정심의 및 공법사 계약 체결	2018. 06.

ᷮ 하반기 추진계획

◦ 기본 및 실시설계 설계자문회의	2018. 07.

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 추진	2018. 08. ~ 09.

◦ 기본 및 실시설계 용역 준공	2018. 10.

◦ 건설공사 발주	2018. 11.

6		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 비 : 2,548백만원

◦ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2018. 12.

◦ 사업내용

▸ 시민생활에 불편한 하수도 슬러지 준설, 하수관로 연장, 맨홀단차 등생활의 불편을 주는 민원에 대하여 주민숙원사업 처리

◦ 사업개요	62건 / 2,548백만원

▸ 소규모 주민 숙원 사업                  :     21건 / 2,212백만원

▸ 읍면동 견문보고 사업(현장행정)          :     41건 /   336백만원

ᷮ 상반기 추진실적

◦ 소규모 주민숙원사업

▸ 읍면동지역 하수도 시설 및 준설(14건) 완료      : 1,400백만원

◦ 읍면동 주민예산편성사업(35건) 완료               :   271백만원

ᷮ 하반기 추진계획

◦ 소규모 주민숙원사업(7건) 추진                       :   812백만원

▸ 읍면동 하수도 시설공사 및 준설, 초기우수시설 유지보수 등

◦ 읍면동 주민예산편성사업(6건) 추진                 :   65백만원

▸ 왕궁면 후암마을 하수도 정비공사 외 5건