2018. 10.

제212회 익산시의회(1차 정례회)

2018 행정사무감사

	문화산업국

역사문화재과

	□		감사자료 과 공통사항
		1.			2017 업무성과	………	173
		2.			2017 예산집행 및 추진사항	………	174
		3.			2017 행정사무감사 지적사항 조치결과	………	177
		4.			2017 상급기관 감사 지적사항 및 조치결과	………	178
		5.			시정질문 조치 결과	………	179
		6.			주요사업 조서(3천만원 이상)	………	182
		7.			2017 각종 민원 접수 처리내역	………	186
		8.			기금 운용 관련사항	………	187
		9.			위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	………	188
		10.			용역사업 관련	………	190
		11.			인․허가 민원처리 관련사항	………	192
		12.			각종공사 설계 변경 상황	………	193
		13.			건설공사 집행 현황(3천만원이상)	………	194
		14.			민간에 대한 보조금 집행 내역	………	197
		15.			국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)	………	199
		16.			2017년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역	………	201
		17.			2018년도 명시이월 내역	………	203
		18.			예산전용 사항 및 예비비 집행 현황	………	205
		19.			공사 준공기한 연장 내역	………	205
		20.			국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	………	205
		21.			국․도비 반납현황 및 사유	………	206
		22.			2017 계획사업 중 미착공사업 현황	………	207
		23.			2017 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황	………	207
		24.			2017년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황	………	207
		25.			2017년도 예산편성 후 전액 미집행 내역	………	208
		26.			소송사건 현황	………	208
		27.			시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	………	209

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	세계유산 보존관리 및 활용 추진현황 ………………	213
				2.	고도 이미지 찾기 사업 추진현황 …………………	214
				3.	옥룡천 옛물길 회복사업 추진현황 ………………	215
				4.	이주단지 조성사업 추진현황 ………………………	216
				5.	문화유산 보존정비 현황 ……………………………	217
				6.	익산 국가무형문화재 통합전수교육관 운영 실적 ……	219
				7.	왕궁리유적 보수정비 추진현황 ……………………	220

감사자료 과 공통사항

1. 2017 업무성과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□
		고도육성계장		송석민	□
		문화재활용계장		방혜경	□
		문화재시설계장		박 성 일	□
		세계유산계장		이천권	□

□ 성      과

◦ 문화재 보존정비 추진

▸백제왕궁 정원, 화장실, 공방 정비 공사 착수

▸백제왕궁 궁궐담장(744m), 후원영역(환수구 450m 및 곡수로 682m)정비 완료

▸미륵사지 배수로 정비(1,100m) 및 건물지 정비 공사 착수

▸백제왕궁지 발굴 및 미륵사지 복원□정비연구 대행사업 추진

▸제석사지 등 문화재 보존정비 28건(완료 25건 / 진행중 3건)

◦ 세계유산 보존관리 및 활용

▸왕궁리유적편의시설 설치 공사 착수 (지하1층, 지상1층, 연면적 429.54㎡)

▸미륵사지 관리센터 및 편의시설 건립 완료(지상1층, 연면적 279.92㎡)

▸세계유산 통합방범시스템 구축 완료(백제왕궁 8대, 미륵사지 9대)

▸백제왕궁 천년별밤 캠프(6회 180명), 한가위 소원등 날리기 행사(1,000여명)

◦ 고도보존육성사업 추진

▸고도지구지정면적 확대(미륵사지 등 8개 유적 포함) 121.3만㎡ ⇒ 308.5만㎡

▸이주단지 택지 분양 총25필지 중 8필지 분양

▸옥룡천 옛물길사업(천변공원 조성, 교량경관 개선 등)

▸고도 이미지 찾기사업 추진

- 한옥지원사업 71건 (한옥 38건  담장및대문 33건)

- 금마가로경관개선사업, 공공기관(금마파출소, 금마우체국) 외관정비사업 추진

▸서동생가터 진입부 정비(수변데크, 주차장, 쉼터 등)

-중앙 투자심사 완료(19,430백만원/2017.6.8)

◦ 익산시 향토유적 신규지정 (3건/ 2017.12.29.)

▸김대건(안드레아)신부 순교비, 숭림사 영원전, 숭림사 정혜원

◦ 2018년 문화재청 공모사업 선정(3건/265.5백만원)

▸문화재 야행사업, 생생문화재 활용사업, 향교․서원 활용사업

◦ 문화특화지역(문화도시) 조성사업 기반 구축

▸역사문화도시조성사업팀 및 역사문화도시추진단 구성

▸역사문화도시 정책포럼 및 지역문화 네트워크 구축을 위한 시민□단체간담회

2. 2017예산집행 및 추진사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

【 2017. 12. 31현재 】                                          (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비 고
역사문화재과				36,769,162	20,214,996	16,554,166	55.0	이월액 13,710,491 - 명시 4,174,164 - 사고 3,419,587 - 계속비 6,116,740
	전통문화 보존 및 전승			36,578,711	20,024,551	16,554,160	54.7
		문화재 보존 및 전승		16,158,302	10,704,547	5,453,755	66.2
			문화재 보수 정비	109,937	109,884	53	100
			향토유적 정비	1,194,884	856,035	338,849	71.6
			문화재 운영	41,110	41,110	0	100
			세계유산 보존관리 사업(왕궁리유적)	5,614,850	3,340,214	2,274,636	59.5	계속비이월 1,127,707
			세계유산 보존관리 사업(미륵사지)	2,065,714	1,630,362	435,352	78.9
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(제석사지)	721,269	378,901	342,368	52.5	계속비이월 78,413
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	4,580,645	2,766,385	1,814,260	60.4	명시이월 1,213,501
			도지정 문화재 보수정비	898,099	757,785	140,314	84.4	명시이월 33,399
			문화재 재난방지 시설구축	80,000	79,187	813	99.0
			문화재 방재시설 유지관리 지원	21,500	21,500	0	100
			목조문화재 U-안전 관리시스템 유지관리	7,770	7,770	0	100
			문화재 안전경비원 배치 및 활용	80,196	78,919	1,277	98.4
			전통사찰 보수 정비	48,000	47,724	276	99.4
			전통사찰 방재시스템 구축	114,000	111,072	2,928	97.4
			전통사찰 방재시스템 유지관리	10,900	10,900	0	100
			국가무형문화재 통합전수교육관 운영	100,981	100,976	5	100
			전수교육관 활성화 지원	50,000	50,000	0	100
			무형문화재 전수활동비	70,700	70,700	0	100
			농악 전승학교 지원	12,000	12,000	0	100
			기예능 보유자 전수지원	126,906	126,904	2	100
			문화재긴급보수사업	99,241	99,019	222	99.8	명시이월 99,241
			전통사찰 정비	102,400	0	102,400	0.0
			무형문화재 전수시설 개선지원	7,200	7,200	0	100
		역사도시 조성		4,892,711	3,819,287	1,073,424	78.1
			세계유산 보존 관리 사업	137,396	136,033	1,363	99.0
			세계유산 보존관리 사업(백제역사유적지구)	1,384,818	1,337,580	47,238	96.6	명시이월 809,104
			세계유산 활용 및 홍보 사업	381,480	228,571	152,909	59.9	명시이월 150,000
			세계유산 활용 및 홍보 사업(백제역사유적지구)	412,000	362,000	50,000	87.9
			백제세계유산센터 운영	266,700	266,700	0	100.0
			왕궁리유적 편의시설 설치	1,174,197	562,603	611,594	47.9	명시이월 1,174,197
			역사문화도시 조성	231,120	30,800	200,320	13.3
			역사문화도시조성(보조)	20,000	20,000	0	100
			문화특화지역 조성 사업(보조)	825,000	815,000	10,000	98.8	명시이월 100,000
			세계유산 활용사업(보조)	60,000	60,000	0	100
		고도보존 육성		15,527,698	5,500,717	10,026,981	35.4
			고도보존 정비	209,343	209,343	0	100	사고이월 181,343
			익산고도육성사업	10,055	10,055	0	100
			익산고도육성사업(보조)	3,832,966	2,766,110	1,066,856	72.2	명시이월 594,722 사고이월 3,238,244
			고도지구 주거환경 및 가로경관 개선 지원	2,714,000	1,087,799	1,626,201	40.1
			고도지구 주거환경 및 가로경관 개선 지원(보조)	8,596,334	1,412,410	7,183,924	16.4	계속비이월 4,910,620
			문화재지역 주민공감정책사업	15,000	15,000	0	100
			2017년 지자체 한옥건축 지원사업	150,000	0	150,000	0.0
	재무활동			160,076	160,070	6	100
		보전지출		160,076	160,070	6	100
	행정운영경비			30,375	30,375	0	100
		기본경비		30,375	30,375	0	100

3. 2017행정사무감사 지적사항 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□
		문화재시설계장		박 성 일	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과-	비고
1	•예산집행 관련 ▸불요불급한 사업에 예산이 편성되지 않도록 하여 예산집행률을 제고하고, 가람 생가 이엉공사비가 과다 책정된 것으로 판단되는바 조정하기 바람	▸문화재 보수정비 문화재청 설계승인 기간 소요로 인해 집행실적이 저조하나, 착수 후 선급금 및 기성금 등 적극 집행으로 예산을 최대한 집행하겠으며, 이엉공사비는 개선 노력하겠음
2	•연구용역 관련 ▸연구용역에 대한 수의계약이 과다하므로 향후 제한경쟁 또는 공개경쟁을 통해 계약하기 바라며, 중복 목적 용역이 발주되지 않도록 노력하기 바람	▸효과적인 연구용역이 될 수 있도록 종합 검토하여 수의계약 최소화 및 제한경쟁 또는 공개경쟁 계약하고, 중복 목적 용역이 발주되는 일이 없도록 노력하겠음
3	•나루토 여관 복원 방안 마련 ▸나루토 여관이 향토유적으로 지정되지 않아 철거가 예상되는바 향후 복원을 위한 방안을 마련하기 바람	▸향토유적 등 문화재지정은 소유주 직접신청 또는 동의가 필요한 사항 ▸나루토 여관은 평화지구주거개선사업부지에 편입 - 현재 한국토지주택공사 소유 ▸현 제반사항을 고려하여 기록으로 남기고, 자료는 근대역사자료관(삼산의원 이전 활용) 보존 전시하고자 함

4. 2017상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

5. 시정질문 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

【관리번호 : 202 - 1 - 1 】

일 시	2017. 6. 13. (제202회 제1차정례회)	질문의원	김용균	답 변	시장
		설명일자	2017.6.22
제 목	천호동굴 관광자원 개발			소관부서	문화산업국 (역사문화재과)
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( ○ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 천연기념물인 천호동굴을 관광자원으로 개발하라
▣ 답 변 내 용 ◦ 천호동굴 개요 - 규모 : 길이 904m(호남 유일의 석회암 동굴) - 구성 : 수정궁이라 불리는 광장, 높이 12m의 석주 및 석순들로 이루어짐 - 천연기념물 지정 : 1966년 ◦ 천호동굴 현황 - 오랜 시간동안 낙서, 쓰레기 유입, 동굴 인접지역의 축사에서 발생한 축분 등으로 훼손 및 오염 - 현재 동굴 출입 제한 중 ◦ 그간 천호동굴 보존․관리 현황 - 2012년 : 동굴내부의 낙서 및 오염물 제거, 천호동굴 정비 및 보존․활용계획 수립 - 2013년~2017년 : 동굴의 근본적인 오염원 제거를 위해 문화재보호구역에 위치한 축사 및 토지 매입(6필지 42,657㎡) 및 토지 안정화를 위한 초지 조성 ◦ 천호동굴의 관광자원 개발 문제점 - 현재 축분 등에 의한 오염이 해소되지 않음 - 석순 등 동굴 내부의 훼손이 심각함 ※ 천연기념물 보존을 위한 공개제한 고시 2011. 5. ~ 2021. 5. 31(10년간) / 문화재청 - 동굴의 규모가 작고 협소하여 관람을 위한 안전시설 등 인공시설물 설치 불가능하며, 안전관리원을 동반한 소수의 체험관광만이 가능 ▣ 금 후 계 획 ◦ 상당기간 오염 및 훼손된 동굴의 안정화가 선행 필요 ◦ 동굴 안정화 등 제반여건 성숙시 단계적 정비 활용 추진

【관리번호 : 202 - 1 - 2 】

일 시	2017. 6. 13. (제202회 제1차정례회)	질문의원	김용균	답 변	시장
		설명일자	2017.7.7
제 목	왕궁리유적 후원 개방 및 관광객 편의시설 설치			소관부서	문화산업국 (역사문화재과)
처리결과	완 결 ( ○ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 왕궁리 후원 개방을 앞당겨 주시고 유적지 주변에 관광객 편의시설을 설치바람
▣ 답 변 내 용 ◦ 익산 백제왕궁은 국내 유일의 현존하는 백제 왕궁터로써 그 중요성을 인정받아 2015년 7월 4일 유네스코 세계유산으로 등재 - 규모 : 남북 492m, 동서 234m - 유구 내용 : 궁궐담장, 정원, 후원(환수구 및 곡수로, 건물지 등), 공방, 화장실 등 ◦ 정비 현황 : 2007년부터 발굴완료지역에 대하여 단계적으로 정비를 실시 중 - 정비 현황 ▸ 후원영역(환수구 및 곡수로, 건물지 등) 및 궁궐담장 정비 완료 ▸ 2017년 왕궁리유적 정비공사(정원, 공방, 화장실 등) 진행 중 ◦ 후원영역 개방 : 2017. 7. 11(화) 완료 - 환수구 및 곡수로, 건물지 정비 완료 ▣ 추 진 사항 ◦ 왕궁유적지편의시설 설치 : 2017. 7. ~ 2018. 5. ◦ 왕궁리유적 후원 정비공사 추진 : 2017. 7. ~ 2018. 11. ◦ 왕궁리유적지 내 탐방로 조명설치 : 2018. 6. ~ 2018. 8.

【관리번호 : 202 - 5 - 8 】

일 시	2017. 6. 13. (제202회 제1차정례회)	질문의원	임형택	답 변	시장
		설명일자	2017.7.20
제 목	나루토 여관 대책 마련			소관부서	문화산업국 (역사문화재과)
처리결과	완 결 ( ○ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 나루토여관 존치 및 실측, 활용에 대한 대책
▣ 답 변 내 용 ◦ 평화동 주거환경개선지구 내 구 나루토여관은 현재 한국토지주택공사에서 보상이 완료되어 절거를 앞두고 있음 ◦ 구 나루토여관에 대한 전문가 자문 검토 결과 현재 노후로 인해 이전 복원은 현실적으로 어려운 실정임 - 아울러, 문화예술의 거리 일원은 도시계획상 상업지역 방화지구로 목조건축물 건립은 불가한 상황 ◦ 다만, 구 나루토여관에 대한 기록화 및 사진자료 등을 확보하여 문화예술의 거리에 조성될 예정인 익산 근대역사자료관에 보관·전시하는 방안을 모색하고 있음 - 기록화사업을 사업시행자측에 요청했지만 불가하다는 입장이여서 제2회 추경예산을 확보하여 우리시에서 추진하고자 함 ▣ 추 진 사 항 ◦ 나루토여관 기록화사업 추진 : 2017. 10 ~ 2018. 2.

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□
		고도육성계장		송석민	□
		문화재활용계장		방혜경	□
		문화재시설계장		박 성 일	□
		세계유산계장		이천권	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	43개 사업	24,643,266	11,305,703	13,337,563
왕궁리 유적정비	후원영역 및 궁궐담장 정비	4,187,143	2,081,904	2,105,239	공사추진중 (2017.12~2018.12)	계속비 이월
왕궁리 유적 발굴조사	왕궁리유적발굴조사(공기관대행)	300,000	300,000	0	대행사업 추진중 (2017.3.~2018.8.)
미륵사지 정비	미륵사지 기단부 및 배수로 정비 등	1,465,714	1,030,361	435,353	공사추진중 (2017.12~2018.12.)	계속비 이월
미륵사지 복원고증연구	미륵사지 복원연구 (공기관대행)	600,000	600,000	0	대행사업 추진중 (2017.4~2018.8)
제석사지 정비	동서건물지, 회랑지, 폐기장 정비, 토지매입	642,857	300,489	342,368	공사완료 토지매입 추진중	계속비 이월
서동역사문화공원 진입부 및 가로변 정비	서동역사문화공원 진입부 및 가로변 정비	770,000	768,229	1,771	완료
여산 숲정이 순교성지 정비	성토 및 토지안정화	292,400	21,382	271,018	완료 (2017.12~2018.2)	명시 이월
익산 구 이리농림학교 축산과 교사 정비	기초부 및 주변포장 보강, 노후훼손 조적벽체 보수	150,000	147,896	2,104	완료
익산 중앙동 구 삼산의원 이전 복원	이전 및 복원정비	2,000,000	619,319	1,380,681	공사추진중 (2017.4~2018.10)	명시 이월
익산 구 익옥수리조합 사무소와 창고정비	지붕 및 외벽보수	60,000	50,739	9,261	완료
익산 함라마을 옛 담장 정비	노후담장보수	50,000	48,998	1,002	완료
익산 고도리석조여래입상 정밀안전진단	서측여래입상 정밀안전진단 및 탐방로 정비	150,000	127,918	22,082	완료
익산 쌍릉 발굴조사	쌍릉 발굴조사	337,143	176,960	160,183	완료 (2017.8.~2018.5.)	명시 이월
익산토성 정비	탐방로등 정비	500,000	441,440	58,560	완료	명시 이월
망모당 지붕보수	망모당·협문기와고르기,주변정비, CCTV설치	44,732	44,732	0	완료
함벽정 정밀 실측 및 정비	석축 및 기단보수 수목간벌, 정밀실측	101,106	101,106	0	완료
이병기 선생 생가정비	초가이엉잇기(2회)	40,000	37,234	2,766	완료
심곡사 대웅전 주변정비	대웅전 석축보수,명부전 기단보수	150,000	100,410	49,590	완료	명시 이월
김안균가옥 재난방지시스템 구축	재난방지시스템 구축(방범, 소화)	37,269	37,269	0	완료
조해영가옥 정비 및 재난방지 시스템 구축	창호 및 난간, 기단보수, 재난방지시스템 구축(방범, 소화)	52,540	52,540	0	완료
삼세오충열사 주변정비	담장 및 주차장 정비, CCTV설치	39,049	39,049	0	완료
금마도토성 발굴조사	발굴조사용역	35,325	35,325	0	완료
숭림사 보광전 방재시설 구축	문화재 재난방지시설 구축	80,000	79,187	813	완료
사자암 보수정비	대웅전, 삼성각 종각 방염처리	48,000	47,724	276	완료
남원사 방재 시스템 구축	방재시스템 구축	114,000	111,072	2,928	완료
평화동 구 순천여관 기록화사업	평화동 구 순천여관 기록화	30,000	0	30,000	완료 (2017.9.~2018.2.)	명시 이월
함열현 관아터 정비 및 활용 연구용역	관아터 위치 및 복원정비, 범위와 활용계획 수립	30,000	0	30,000	완료 (2017.6.~2018.1.)	명시 이월
연동리석조여래좌상 복원고증학술용역	연동리불상 복원 및 보존 기초조사	100,000	43,500	56,500	완료 (2017.6.~2018.5.)	명시 이월
역사고도 익산의 정체성확립 학술회의	<6~7세기 백제사에 있어서 익산의 위상> 학술회의 개최	30,000	24,773	5,227	완료
문화특화지역 조성사업	역사문화도시지정 예비사업	725,000	725,000	0	보조사업 추진중 (2017.4.~2018.10.)
고도이미지 찾기 사업	한옥 및 담장․대문 / 가로변외관정비사업지원	6,261,286	1,330,000	4,931,286	한옥10준공(480백만원) 한옥17기성(730백만원) 담장6준공(120백만원)	계속비 이월
금마가로경관기본설계용역	가로변외관정비를 위한경관기본설계용역	96,477	72,532	23,945	완료 (2016.2~2017.8)	계속비 이월
금마가로경관 개선사업	공공기관건축물외관정비및 가로변보차도정비	2,200,511	0	2,200,511	공사추진중(2017.2~2018.12)	계속비 이월
금마전선 지중화사업	금마주요가로변 전선지중화	1,714,000	927,799	786,201	전선지중화 추진중 (2017.6~2018.12)	명시 이월
2017년 지자체 한옥건축 지원사업	이주단지보건소실시설계	150,000	0	150,000	실시설계용역 추진중 (2017.10~2018.10)	명시 이월
세계유산 관람환경개선사업	세계유산 관람로 등 정비	150,000	102,776	47,224	완료 (2017.1~2018.8)	명시 이월
백제역사유적지구 통합방범 시스템구축	CCTV설치 (미륵사지9대) (백제왕궁8대)	325,714	321,515	4,199	완료
익산토성 연계 탐방로 편익시설 조성	익산토성 주차장, 화장실 등 설치	100,000	97,092	2,908	완료
백제역사유적지구 세계유산 영문 홈페이지 개편	세계유산 홈페이지 개편	50,000	0	50,000	완료 (2017.12.~2018.4.)	명시 이월
백제역사유적지구 국제학술대회 개최	세계유산과 고도의 보존활용방안 모색	50,000	46,333	3,667	완료
한국의고도와익산학술대회개최	한국의 고도 미래상 모색	23,000	22,497	503	완료
백제왕도 핵심유적 보존관리시행계획 연구용역	백제왕도 보존관리 시행계획 수립	300,000	130,603	169,397	추진중 (2016.5.~2018.12.)	계속비 이월
세계유산 연계 도보탐방 프로그램 운영	문화재 활용 체험프로그램 운영	60,000	60,000	0	완료

7. 2017 각종 민원(진정, 건의, 청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박 성 일	□
		문화재활용계장		방혜경	□

종 류	민원인	요 구 내 용	처 리 내 용
건 의	송옥섭	천호동굴 개방	1. 천연기념물 제177호 천호동굴(1966.02.28일 지정)은 무분별한 입굴과 훼손으로 동굴 보호와 회복을 위해 1970년 폐쇄되었으며, 2. 2012년 낙서, 쓰레기 등으로 오염된 부분에 대해 동굴에 손상 없는 범위에서 정화작업을 실시하고 문화재청, 전문가 협조 하에 천호동굴 정비 및 보존 활용계획을 수립 하였음. 3. 2013~2014년 문화재청과 전북도의 적극적인 예산지원을 통해 동굴 상부(입구) 지역의 축사를 매입하여 오염원을 해소하였으며, 전문가 의견에 따라 주변에 초지를 조성하여 동굴 자생 여건을 마련할 계획임. 4. 현재 천호동굴은 그간의 오염 노출과 무분별한 훼손으로 그 상태가 매우 불안정하여 긴급히 오염원을 제거하고 휴식년을 제공하고 있는 상황으로 우리시는 문화재청, 전북도, 관계전문가 등과 정기적인 실태조사(지침상 매 5년)와 의견 수렴을 통해 천호동굴 활용 방안 및 개방 가능성 등을 적극 검토할 계획임(2022년)
진 정	익산목발노래보존회	익산목발노래보존회의 보유자, 이수자도 아닌 자가 오인할 수 있는 익산목발노래 공연 금지 요청	역사문화재과-4207(2017.04.20.)호 - 무형문화재 공연 참여 및 유사명칭 사용 금지 협조 요청 이수자 외 유사명칭 사용금지 법률근거 통보(전부서)

8. 기금 운용 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□
		문화재활용계장		방혜경	□
		문화재시설계장		박 성 일	□

□ 위원회 설치 및 운영현황                               (단위: 천원)

위 원 회 명	설치근거	위원장	구성원수	기능 구분	운영횟수	예 산 현 황
						운영예산	위원수당 지급내역	불용예산 현 황
계	3개		34			8,610	6,380	2,230
익산시 향토유적 심의 위원회	익산시 향토유적 보호조례 제3조	부시장	11	심의	1	630	350	280
국가무형문화재 통합전수관운영위원회	익산시 국가무형문화재 통합전수교육관 설치 및 운영조례 제6조	부시장	8	심의	0	1,260	0	1,260
익산시 고도 보존육성지역 심의위원회	익산시 고도보존 육성 및 주민지원에 관한 조례 제5조	김현숙	15	심의	14	6,720	6,030	690

□ 익산시향토유적심의위원회 위원 명단

직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소	직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소
위원장	김철모	당연직	부시장	위 원	김정희	2015.4.1	원광대 고고미술사학과 교수
위 원	김주일	당연직	문화산업국장	〃	전경미	〃	예원예술대 문화재보존예술학과 교수
〃	이다운	2015.4.1	원광대 역사교육과 교수	〃	홍승재	〃	원광대 건축학과 교수
〃	안승모	〃	원광대 고고미술사학과 교수	〃	임홍낙	〃	익산고등학교교장 (향 토 사)
〃	김선기	〃	원광대 박물관 학예연구팀장	〃	배병선	〃	국립문화재연구소 건축실 실장
〃	남해경	〃	전북대 건축공학과 교수

□ 익산시 국가무형문화재 통합전수교육관 운영위원회 위원 명단

직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소	직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소
위원장	김철모	당연직	부시장	위 원	오석신	2017.2.27	이리향제줄풍류보존회장
위 원	김주일	당연직	문화산업국장	〃	김복현	〃	전)익산문화원장
〃	강경숙	2017.2.27	익산시의회 의원	〃	우종양	〃	원광대 국악과 교수
〃	김익주	〃	이리농악 보존회장	〃	문이화	〃	원광대 프라임 사업단 연구교수

□ 익산시 고도보존육성지역심의위원회 위원 명단

직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소	직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소
위원장	김현숙	2017.10.28	전북대 도시공학과 교수	위 원	홍승재	2017.10.28	원광대 건축학과 교수
부위원장	안선호	〃	원광대 건축학과 교수	〃	김선기	〃	원광대 박물관 학예연구팀장
위 원	김연식	〃	익산시의회 의원	〃	이문형	〃	마한백제문화연구소책임연구원
〃	송호진	〃	익산시의회 의원	〃	윤충열	〃	원광대 건축학과 교수
〃	민두희	〃	고도보존 주민협회장	〃	명 현	〃	전북대 생태조경디자인학과 교수
〃	이시형	〃	금마면 이장협의회장	〃	장한두	〃	전북대 도시공학과 교수
〃	김 구	〃	금마면 번영회회장	〃	송일섭	〃	(주)인우건설 대표
〃	우종문	〃	금마면 주민자치 위원회위원장

10. 용역사업 관련

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□
		고도육성계장		송석민	□
		문화재시설계장		박 성 일	□
		세계유산계장		이천권	□

□ 사업조서

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	용역업체	용역비	계약방법	추진사항
계	24개 사업		1,370,795
설계용역	익산 미륵사지 배수로 및 기단부 정비 설계용역	㈜도시건축사 사무소	105,012	일반경쟁	용역완료 (2017.2.8. ~2017.10.26.)
설계용역	2017년 익산 왕궁리유적 정비 설계용역	㈜길건축사 사무소	199,200	일반경쟁	용역완료 (2017.2.28. ~2017.10.26.)
설계용역	심곡사 대웅전 주변정비공사 설계용역	㈜길건축사 사무소	14,926	일반경쟁	용역완료 (2017.1.19. ~2017.2.27.)
설계용역	2017년 익산토성 정비 설계용역	㈜바른종합 건축사 사무소	22,054	일반경쟁	용역완료 (2017.1.19. ~2017.3.20.)
설계용역	익산 고도리 석조여래입상 주변정비공사 설계용역	㈜길건축사 사무소	14,153	일반경쟁	용역완료 (2017.1.19. ~2017.3.17.)
설계용역	익산 구 이리농림학교 축산과 교사 정비 설계용역	㈜길건축사 사무소	15,847	일반경쟁	용역완료 (2017.1.19. ~2017.3.17.)
설계용역	미륵사지 당간지주 및 고도리 석조여래입상(서측) 정밀안전진단 용역	(유)세종건설기술	36,250	일반경쟁	용역완료 (2017.2.1. ~2017.7.28.)
설계용역	2017년 익산 제석사지 정비공사 설계용역	㈜아리건축사 사무소	46,824	일반경쟁	용역완료 (2017.1.17. ~2017.4.14.)
설계용역	함벽정 정밀실측조사 및 정비공사 설계용역	㈜아리건축사 사무소	46,340	일반경쟁	용역완료 (2017.1.24. ~2017.7.21.)
설계용역	익산 미륵산성 정비공사 설계용역	㈜바른종합 건축사사무소	26,048	일반경쟁	용역완료 (2017.4.10. ~2017.8.3.)
설계용역	심곡사 대웅전 주변정비공사(2차) 설계용역	㈜길건축사 사무소	31,086	일반경쟁	용역추진중(2017.9.28. ~용역중지)
감리용역	익산 중앙동 구삼산의원 이전복원 건축공사 감리용역	예일건축사 사무소	14,719	일반경쟁	용역추진중 (2017.5.17. ~2018.10.)
감리용역	2017년 제석사지 정비공사 감리용역	㈜오름	11,800	일반경쟁	용역완료 (2017.10.11. ~2017.12.22.)
설계 용역	금마 고도 가로변 공공건축물 외관정비사업 실시설계용역	상민건축사 사무소	15,352	일반경쟁	용역추진중 (2017.2.27.~ 2018.8.26.)
설계 용역	금마 고도 가로경관개선사업 실시설계용역 (보차도정비)	㈜우향 이엔씨	43,270	일반경쟁	용역추진중 (2017.5.1.~ 2018.4.4.)
설계 용역	금마 옥룡천내 용수로 정밀점검(안정성검토)및 실시설계용역	㈜동운	9,236	수의계약	용역완료 (2017.9.5.~ 2017.10.14.)
학술연구 용역	건륭15년명감로탱화 과학적조사 및 보존방안 수립용역	한림보존테크	7,280	수의계약	용역완료 (2017.7.26. ~2017.9.12.)
학술연구용역	익산토성 발굴조사 (2차) 학술용역	원광대학교 산학협력단	278,945	수의계약	용역완료 (2017.6.8. ~2017.9.11.)
학술연구 용역	익산쌍릉 발굴조사	원광대학교 산학협력단	252,800	일반경쟁	용역추진중 (2017.7.10.~ 2018.4.26.)
학술연구 용역	금마도토성 시굴조사	(재)전북문화재 연구원	8,730	수의계약	용역완료 (2017.4.4.~ 2017.5.15.)
학술연구 용역	금마도토성 발굴조사	(재)전북문화재 연구원	26,595	수의계약	용역완료 (2017.6.19.~ 2017.7.30.)
학술연구 용역	평화동 구 순천여관 기록화	㈜바른종합 건축사사무소	26,048	일반경쟁	용역완료 (2017.11.6.~ 2018.2.5.)
학술연구 용역	함열현 관아터 정비 및 활용 연구용역	원광대학교 산학협력단	26,400	수의계약	용역완료 (2017.7.17. ~ 2018.1.15.)
학술연구용역	연동리석조여래좌상 복원고증학술용역	원광대 산학협력단	91,880	수의계약	용역완료 (2017.6.22.~ 2018.5.29.)

11. 인․허가 민원처리 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□

○ 고도지구내 행위허가

구분	허가 신청				처리 결과								비고
	계	신축	증축	기타	계		신축		증축		기타
					허가	불허가	허가	불허가	허가	불허가	허가	불허가
2017	31	31			31		31

12. 각종공사 설계 변경상황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□
		문화재시설계장		박 성 일	□
		세계유산계장		이천권	□

(단위 : 천원)

일자	사업명	계약액	변경액	증 감	계약자	공사기간	변경사유등
계	8개 사업	2,701,595	3,028,739	327,144
2017.5.30.	서동역사문화공원 진입부 및 가로변 정비공사(1차)	676,376	757,731	81,355	㈜명인 종합건설	2017. 2. 23. ~2017. 6. 22.	연동제 제방 하부 보호를 위한 보강토 옹벽 및 데크설치 추가,
2017.6.15.	익산 나바위 성당 및 주차장 정비공사	173,283	221,236	47,953	(유)남전종합건설	2017. 4. 12. ~2017. 6. 10.	옹벽 보강공사 추가
2017.6.19.	여산 숲정이성지 주변정비공사	77,960	89,160	11,200	(유)한국 페이버	2017. 5. 24. ~2018. 1. 18.	가설창고(1동) 삭감 성토다짐 증(1,056㎥) 반입토 증(1,119㎥) 환경보전비 반영
2017.8.3.	익산토성 정비공사	148,274	164,024	15,750	㈜한경 문화재	2017. 6. 21. ~2017. 8. 19.	데크 공사변경, 토성법면 정리추가
2017.10.17.	미륵사지 배수로 및 기단부 정비공사 (설계용역)	105,012	125,163	20,151	㈜도시 건축사사무소	2017. 2. 9. ~2017. 10. 24.	전문가 자문의견 및 문화재청 위원회 심의결과에따른 보존처리공사 물량증가에 따라 용역내용 및 용역비 변경
2017.11.15.	구 이리농림학교 축산과 교사 정비공사	117,811	134,126	16,315	㈜다온	2017. 6. 28. ~2017. 12. 24.	가설창고 및 펜스 감소 부식된 목공사 추가 지붕 마감재 변경 굴뚝 복원공사 추가
2017.11.30.	왕궁리 편의시설 신축공사	865,094	946,991	81,897	(유)송덕건설	2017. 7. 31. ~ 2018. 3. 10.	고압블럭 추가시공 (진입부)
2017.12.8	미륵사지 관리센터 및 편의시설 조성공사	537,785	590,308	52,523	(유)신화토건	2017. 6. 23. ~2017. 12. 19.	옹벽 및 배수로 공사추가, 정화방식 변경 (정화조→직관연결)

13. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□
		문화재시설계장		박 성 일	□
		세계유산계장		이천권	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	28개 사업	19,496,408	10,372,459	9,123,949
왕궁리 유적정비	후원영역 및 궁궐담장 정비	4,187,143	2,081,904	2,105,239	공사추진중 (2017.12~2018.12)	계속비이월
미륵사지 정비	미륵사지 기단부 및 배수로 정비 등	1,465,714	1,030,361	435,353	공사추진중 (2017.12~2018.12)	계속비이월
제석사지 정비	동서건물지, 회랑지, 폐기장 정비	300,489	300,489	0	완료
서동역사문화공원 진입부 및 가로변 정비	서동역사문화공원 진입부 및 가로변 정비	770,000	768,229	1,771	완료
여산 숲정이 순교성지 정비	성토 및 토지안정화	292,400	21,382	271,018	완료 (2017.12~2018.2)
익산 구 이리농림학교 축산과 교사 정비	기초부 및 주변포장 보강, 노후훼손 조적벽체 보수	150,000	147,897	2,103	완료
익산 중앙동 구 삼산의원 이전 복원	이전 및 복원정비	2,000,000	619,319	1,380,681	공사추진중 (2017.4~2018.10.)	명시 이월
익산 구 익옥수리조합 사무소와 창고정비	지붕 및 외벽보수	60,000	50,739	9,261	완료
익산 함라마을 옛 담장 정비	노후담장보수	50,000	48,998	1,002	완료
익산토성 정비	토성내부 발굴지 정비	441,440	441,440	0	완료
망모당 지붕보수	망모당·협문기와고르기,주변정비, CCTV설치	44,732	44,732	0	완료
함벽정 정밀 실측 및 정비	석축 및 기단보수 수목간벌, 정밀실측	101,106	101,106	0	완료
이병기 선생 생가정비	초가이엉잇기(2회)	40,000	37,234	2,766	완료
심곡사 대웅전 주변정비	대웅전 석축보수,명부전 기단보수	150,000	100,410	49,590	정비공사완료 설계용역중 (2017.10~2018.9)	명시이월
김안균가옥 재난방지시스템 구축	재난방지시스템 구축(방범, 소화)	37,269	37,269	0	완료
조해영가옥 정비 및 재난방지 시스템 구축	창호 및 난간, 기단보수, 재난방지시스템 구축(방범, 소화)	52,540	52,540	0	완료
삼세오충열사 주변정비	담장 및 주차장 정비, CCTV설치	39,049	39,049	0	완료
2015 이주단지 조성사업	토지매입, 조성공사	1,318,489	842,375	476,114	공사완료 (2015.3~2017.12)
2015옥룡천옛물길 회복사업	천변공원및신규탐방로조성,토지매입	1,917,936	1,917,936	0	공사완료 (2015.2~2017.12)
2016옥룡천옛물길 회복사업	탐방로조성매입 건물철거	590,742	0	590,742	공사추진중 (2016.11~2018.9)	사고 이월
금마가로경관 개선사업	공공기관건축물외관정비및 가로변보차도정비	2,200,511	0	2,200,511	공사진행중 (2017.2~2019.2)	계속비 이월
금마전선 지중화사업	금마주요가로변 전선지중화	1,714,000	927,799	786,201	전선지중화 추진중 (2017.6~2018.12)	명시 이월
2017년 지자체 한옥건축 지원사업	이주단지보건소실시설계	150,000	0	150,000	실시설계용역 추진중 (2017.10~2018.10)	명시 이월
세계유산 관람환경개선사업	세계유산 관람로 등 정비	150,000	102,776	47,224	완료 (2017.1~2018.8)	명시 이월
익산토성 연계 탐방로 편익시설 조성공사	익산토성 주차장, 화장실 등 설치	100,000	97,092	2,908	완료
왕궁리유적편의시설설치공사	카페테리아, 휴게실, 세미나실 등	1,172,848	561,383	611,465	완료 (2017.7..~2018.5.)	사고 이월

14. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□
		고도육성계장		송석민	□
		문화재활용계장		방혜경	□
		문화재시설계장		박 성 일	□
		세계유산계장		이천권	□

(단위 : 천원)

단 체 명	사 업 명	세목	예산액	집 행 액	잔액	비고
합 계	11개 단체 / 23개사업		1,271,706	1,262,244	9,462
원광대학교 산학협력단(마한백제문화연구소)	한국의 고도와 익산 학술대회	민간경상 사업보조	23,000	22,497	503
	역사고도 익산의 정체성 확립 학술회의	민간경상 사업보조	30,000	24,773	5,227
사자사	사자암 보수정비	민간자본 사업보조	48,000	47,724	276
남원사	남원사 방재 시스템 구축	민간자본 사업보조	114,000	111,072	2,928
(사)익산고도육성세계 유산보존관리주민협의회	익산고도육성세계 유산보존관리 주민협의회운영지원	민간단체법정운영비보조	28,000	27,538	462
	백제고도에서 즐기는 전통문화체험	민간경상 사업보조	15,000	14,934	66
(재)익산문화재단	문화특화지역 조성사업	민간경상 사업보조	750,000	750,000	0
(사)전북개발연구소	전북 백제사 재발견 책자 발간	민간경상 사업보조	20,000	20,000	0
(재)전북문화재연구원	세계유산 연계 도보탐방 프로그램	민간경상 사업보조	60,000	60,000	0
이리농악보존회	전수교육 육성사업	민간경상 사업보조	50,000	50,000	0
	전수교육관 활성화사업	민간경상 사업보조	20,000	20,000	0
	대한민국 농악축제	민간경상 사업보조	13,000	13,000	0
	전수교육관운영	민간단체법정 운영비보조	7,453	7,453	0
이리향제줄풍류 보존회	전수교육 육성사업	민간경상 사업보조	30,000	30,000	0
	전수교육관 활성화사업	민간경상 사업보조	10,000	10,000	0
	전수교육관운영	민간단체법정 운영비보조	7,453	7,453	0
익산기세배 보존회	전수교육 육성사업	민간경상 사업보조	3,000	3,000	0
	전수교육관 활성화사업	민간경상 사업보조	7,500	7,500	0
	도지정문화재 공개행사비	민간경상 사업보조	3,400	3,400	0
	전수교육관운영	민간단체법정 운영비보조	10,000	10,000	0
익산목발노래 보존회	전수교육 육성사업	민간경상 사업보조	6,000	6,000	0
	전수교육관 활성화사업	민간경상 사업보조	12,500	12,500	0
	도지정문화재 공개행사비	민간경상 사업보조	3,400	3,400	0

▣ 보조금 지원 책정 기준 지급근거

◦ 고도 보존 및 육성에 관한 특별법 제16조 및 제17조의2

◦ 문화재보호법 제72조

◦ 익산시 보조금 관리에 관한 조례 제6조

◦ 비영리민간단체지원법 제6조

◦ 문화예술진흥법 제3조

15. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□
		고도육성계장		송석민	□
		문화재시설계장		박 성 일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				집 행 액				잔 액	비고
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
계 (23개 사업)	25,120,775	16,676,700	3,333,618	5,110,457	11,540,362	8,016,259	1,454,406	2,069,697	13,580,413
왕궁리 유적정비	4,187,143	2,931,000	628,072	628,071	2,081,904	1,457,333	312,286	312,285	2,105,239	계속비이월
왕궁리 유적 발굴조사	300,000	210,000	45,000	45,000	300,000	210,000	45,000	45,000	0
미륵사지 정비	1,465,714	1,026,000	219,857	219,857	1,030,361	721,253	154,554	154,554	435,353	계속비이월
미륵사지 복원고증연구	600,000	420,000	90,000	90,000	600,000	420,000	90,000	90,000	0
익산 구 이리농림학교 축산과 교사 정비	150,000	75,000	37,500	37,500	147,896	73,948	36,974	36,974	2,104
익산 고도리 석조여래입상 정밀안전진단 및 정비	150,000	105,000	22,500	22,500	127,918	89,542	19,188	19,188	22,082
익산 중앙동 구 삼산의원 이전복원	2,000,000	1,000,000	500,000	500,000	619,319	618,659	330	330	1,380,681	명시이월
익산 제석사지 정비	642,857	450,000	96,428	96,429	300,489	300,342	73	74	342,368	계속비이월
익산 쌍릉 발굴조사	337,143	236,000	50,571	50,572	176,960	176,872	44	44	160,183	명시이월
익산토성 정비 및 발굴조사	500,000	350,000	75,000	75,000	441,440	349,008	46,216	46,216	58,560	명시이월
함벽정 정밀 실측 및 정비	101,106	0	50,553	50,553	101,106	0	50,553	50,553	0
역사문화자원활용방안연구용역	100,000	70,000	15,000	15,000	90,000	63,000	13,500	13,500	10,000
연동리석조여래좌상 복원고증학술용역	100,000	70000	15000	15000	43,500	30,450	6,525	6,525	56,500
2015 이주단지 조성사업	1,318,489	922,943	197,773	197,773	842,375	589,663	126,356	126,356	476,114
2015옥룡천 옛물길 회복사업	1,917,936	1,342,555	287,691	287,690	1,917,936	1,342,555	287,691	287,690	0
2016옥룡천 옛물길 회복사업	590,742	413,520	88,611	88,611	0				590,742	사고이월
고도이미지찾기사업(한옥및담장,가로변외관지원)	6,261,286	4,382,900	563,516	1,314,870	1,330,000	931,000	119,700	279,300	4,931,286	계속비이월
금마가로경관 개선사업	2,200,511	1,540,358	198,046	462,107	0				2,200,511	계속비이월
2017년 지자체 한옥건축 지원사업	150,000	150,000			0				150,000	명시이월
세계유산 관람환경개선사업	150,000	105,000	22,500	22,500	102,775	71,943	15,416	15,416	47,225	완료 (2017.1~2018.8) 명시이월
왕궁리유적편의시설 설치	1,172,848	586,424		586,424	561,383	280,691		280,692	611,465	완료 (2017.7.~2018.5.) 사고이월
문화특화지역 조성사업	725,000	290,000	130,000	305,000	725,000	290,000	130,000	305,000	0

16. 2017년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□
		고도육성계장		송석민	□
		문화재활용계장		방혜경	□
		문화재활용계장		방혜경	□
		문화재시설계장		박 성 일	□

□ 명시 및 사고이월 내역 : 20건〔명시 16, 사고 4〕

□ 명시이월 내역 : 16건

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	추진율 (%)	준 공 (완료예정일)	추 진 내 역
계	4,174,164	2,611,126	1,563,038
익산 나바위성당 보수정비	290,775	275,606	15,169	100	2017. 6. 27.	준공
익산 천호동굴 정비	382,942	273,595	109,347	100	2017. 6. 5.	준공
익산 토성 정비	208,050	166,389	41,661	100	2017. 8. 21.	준공
미륵사지 쉼터 정비사업	145,322	115,632	29,690	100	2017. 4. 5.	준공
미륵사지 화장실 리모델링	186,412	181,799	4,613	100	2017. 4 . 12.	준 공
왕궁리유적 궁궐담장 정비	807,540	807,540	0	100	2017. 8. 7.	준공
왕궁리유적 궁궐담장 정비 시설부대비	1,564	1,564	0	100	2017. 8. 7.	완료
여산숲정이 순교성지 주변정비	33,399	33,399	0	100	2018. 2. 7.	준공
중앙동 구삼산의원(안전조치, 정밀실측 및 복원설계)	99,241	99,019	222	100	2017. 4. 21.	용역완료
세계유산 홍보 시설물 설계비	150,000	0	150,000	30	2018. 4. 6	용역 완료
왕궁유적지 편의시설 설치사업	1,172,848	561,383	611,465	100	2018.5.14	공사완료
왕궁유적지 편의시설 설치사업 부대비	1,349	1220	129	100	2017.12.31	완료
익산 역사문화자원 활용방안 연구용역	100,000	90,000	10,000	100	2017. 7. 24.	완료
시행계획고시 등 일간지공고료	3,366	3,366	0	100	2017.12	사업완료
옥룡천 옛물길 회복사업	590,742	0	590,742	0	2018.9	보상완료 건물 철거중
옥룡천 옛물길 회복사업(시설부대비)	614	614	0	100	2017.12	완료

□ 사고이월 내역 : 4건

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	추진율 (%)	준 공 (완료예정일)	추 진 내 역
계	3,419,587	2,943,473	476,114
서동생가터 정비사업 토지매입 등	181,342	181,342	0	100	2017. 11.	사업완료
옥룡천 옛물길 회복사업	1,917,936	1,917,936	0	100	2017.12	사업완료
옥룡천 옛물길 회복사업 시설부대비	1,820	1,820	0	100	2017.12	사업완료
이주단지 조성사업 및 옥룡천 옛물길 회복사업(보상)	1,318,489	842,375	476,114	100	2017.12	사업완료

17. 2018년도 명시이월 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□
		고도육성계장		송석민	□
		문화재시설계장		박성일	□
		세계유산계장		이천권	□

(단위 : 천원)

사 업 명	명 시 이월액	명시이월사유	비 고
계(20건)	4,305,683
함열현 관아터 정비 및 활용 방안연구용역	30,000	연구용역 준공시기(2018.1월) 미도래
익산토성 진입부 토지매입	7,321	토지매입 협의 중
여산 숲정이 순교성지 정비	271,018	공사 준공시기(2018.2월) 미도래
평화동 구 순천여관 기록화 사업	30,000	용역 준공시기(2018.2월) 미도래
연동리 석조여래좌상 원형복원 학술조사	56,500	용역 준공시기(2018.2월) 미도래
익산 중앙동 구 삼산의원 이전복원	1,380,681	공사 준공시기(2018.10월) 미도래
익산토성 정비	58,560	발굴조사용역(3차) 준공시기(2018.3월) 미도래
익산 쌍릉 발굴조사	160,183	용역 준공시기(2018.3월) 미도래
심곡사 대웅전 주변정비공사 설계용역	31,086	문화재 현상변경허가 절차 이행에 따른 용역 중지중
익산향교 대성전 보수정비	78,894	공사 준공시기(2018.6월) 미도래
고종황제 어진 보존처리	25,615	공사 준공시기(2018.2월) 미도래
2017년 전통사찰 편의시설 (벤치)지원	2,400	공사 준공시기(2018.3월) 미도래
2017년 전통사찰 편의시설 (화장실)지원	100,000	공사 준공시기(2018.10월) 미도래
세계유산익산백제역사유적지구 웹사이트전면개편	50,000	홈페이지 구축에 따른 행정절차 이행
세계유산관람환경개선사업	47,224	백제왕궁편의시설 건립 준공 후 (2018.3.) 창고 부지 행정 절차이행
왕궁리유적전시관 ICT체험 콘텐츠 개발	200,000	사업내용 변경 추진
고도이미지찾기사업 한옥 및 담장지원	840,000	2017년 지원신청분에 대한 준공시기 미도래 2018년 분양 후 지원신청분에 대한 보조금 지급예정
금마고도 가로변 전선지중화사업(통신)	652,948	지중화공사를 위한 설계중으로 협약체결 지연
금마고도 가로변 전선지중화사업(한전)	133,253	지중화공사 추진 중으로 추후 사업완료 후 사업비 정산예정
공공건축물 한옥건축 지원	150,000	행정절차 진행중

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

21. 국․도비 반납 현황 및 사유(2017년도 반납건)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□
		문화재시설계장		박 성 일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집행액	잔 액	반 환 금				시비	반납 사유	비고
				계	국 비	도 비	이자
계	9,346,272	9,141,351	204,921	160,071	122,859	37,212	0	44,850
전수교육관건립	2,880,000	2,805,038	74,962	56,222	37,481	18,741		18,740	집행잔액
2016년 문화재돌봄사업	62,406	62,298	108	81	54	27		27	〃
2016년 세계유산보존관리사업	130,000	107,397	22,603	17,856	15,822	2,034		4,747	〃
2016년 문화재 보수정비사업	5,523,571	5,439,068	84,503	71,286	58,069	13,217		13,217	〃
2015~2016년세계유산 활용 및 홍보사업	220,000	206,356	13,644	8,151	6,822	1,329		5,493	〃
2016 문화재 재난안전관리사업	286,476	282,368	4,108	2,772	2,199	573		1,336	〃
2016년 전통사찰방재시스템 구축사업	210,000	205,176	4,824	3,618	2,412	1,206		1,206	〃
2016년 도지정문화재 보수정비사업	33,819	33,650	169	85		85		84	〃

22. 2017년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

23. 2017년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

24. 2017년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

25. 2017년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

26. 소송 사건 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		원형복	□

해  당  없  음

27. 시 홈페이지 접수 민원처리 실태현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□
		문화재시설계장		박성일	□

연번	홈페이지 접수 민원	조치(처리)결과	비고
1	영등그린 인라인 스케이트장내 잔디 밭에 반려견 공원 조성	° 영등동 유적내 반려견 공원 조성은 문화유산 보호를 위한 문화재보호법 취지에 적합하지 않아 반영이 어려움
2	왕궁리유적 발굴조사로 벚꽃나무가 잘려 나가 매우 안타까움	° 발굴조사로 인한 인위적인 벚꽃나무의 훼손은 없으며, 다만 뿌리부분의 정리에 대하여도 최소화하여 시행하고 있습니다. ° 과거 고사목과 태풍으로 쓰러진 나무 등을 정리해서 발굴지 인근에 쌓아놓은 부분 때문에 오해가 발생한 것으로 사료됨
3	시티투어지 개선요청 - 익산 쌍릉 주변 제초작업 및 환경정비 요청	° 17.6.8부터 익산 쌍릉 및 주변 제초작업을 시작하여 6.12일까지 제초 및 환경정비를 완료 하였음
4	미륵산 등산로 계단정비 및 화장실 주변 수도 설치 요청	° 등산로 계단 정비 완료 ° 미륵산 화장실 주변 수도 설치에 대해서는 효율성 및 예산문제 등 검토결과 설치가 어려움
5	옥룡천 공사에 다리를 놓아 주세요	° 당초는 하천양안 공원을 횡단할 수 있는 시설물로 징검다리 설치를 계획하였으나 주민통행 불편 및 하천유지관리상 매우 어려울 것으로 예상되어 기 설치된 용배수로를 관리청(한국농어촌공사)과 협의하여 교량대체시설(인도교)로 설치하였음.
6	미륵산 연수원쪽 계단위험! 재보수 시급	° 미륵산 등산로 나무목 계단 수리를 진행 중이며 금주 내로 완료 하겠음
7	금마 서동 생가터 찾는이도 없고 관심도없고, 정말 생가터가 맞는지	° 그동안 마룡지와 서동생가터 일원은 역사적 유래가 명확함에도 사유지인 관계로 보존관리가 어려웠으나, 서동역사공원조성 기본계획에 따라 생가터 일원이 고도지구로 지정됨에 따라 2022년까지 서동생가 재현, 휴식공간, 주차장 등 편익시설 등을 단계적으로 조성하는 사업으로 금년에는 쉼터, 안내시설, 수변테크를 설치하여 진입부 정비 및 가로변을 우선 정비하였음
8	고도리 석조여래입상 길안내판 및 쌍릉 안내판 보완	° 쌍릉의 경우 소왕릉, 대왕릉 주변에 각 능에 대한 안내판이 비치되어 있으며, 건의하신 고도리석조여래입상 길안내판은 보완하였음.
9	금마면에 한옥만 건축되는 것으로 알고 있는데 3층에 6가구 원룸 허가 여부	° 금마면 보존육성지구 내에 건물 신축시 한옥에만 한정되는 것은 아니며, 고도보존육성지역심의위원회의 심의를 통하여 3층 이상의 다가구 주택 건축이 가능함.

감사자료 과 요구사항

1. 세계유산 보존관리 및 활용 추진현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재활용계장		방혜경	□
		세계유산계장		이천권	□

□ 사 업 개 요

◦ 대상유적 : 미륵사지, 왕궁리유적

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 3,017백만원(국비 1,196  도비 166 시비 1,655)

◦ 사업내용 : 세계유산의 체계적인 상시관리, 왕궁리유적 편의시설 설치, 세계유산의 다양한 활용・홍보사업(10개 사업)

□ 추 진 실 적

◦ 백제역사유적지구 보존관리사업                  : 2017. 1. ~ 12.

‣관람환경개선사업(상시인력 채용, 데크 도장 및 교체, 관람로 정비 등)

‣미륵사지 생육환경 개선(소나무 205주 전지)

‣통합방범시스템 공사 완료(미륵사지6대, 왕궁리유적8대)

◦ 세계유산 활용 및 홍보사업                      : 2017. 1. ~ 12.

‣세계유산홍보 캠페인광고(버스24대/익산역1개소 / 시외버스터미널1개소)

‣세계유산 홍보 책자 배부(가이드북 1,580부 / 리플릿 500부)

‣세계유산 백제 특별전 개최(국립경주박물관 / 3.7 ~ 5.7)

‣세계유산 연계 도보탐방 프로그램 운영(13회 / 300여명)

‣세계유산 일러스트 콘텐츠 공모전 외 (6건 / 312백만원)

‣백제왕궁 천년별밤 캠프(6회 180명)/ 백제왕궁 한가위 소원등 날리기 행사(1,000여명)

‣익산시 문화재 스템프 투어 스탬프북, 거치대 제작

‣익산토성 연계 탐방로 편익시설 설치(주차장, 화장실 등)

‣백제왕궁 바로알기 문화유산 직원 탐방 (9회 / 147명)

◦ 2018년 문화재청 공모사업 선정 (3건 / 265.5백만원)

‣문화재야행사업(200), 생생문화재활용사업(27.5), 향교·서원 활용사업(38)

◦ 왕궁유적지 편의시설 설치공사 추진        : 2017. 1 ~ 2017. 12

‣면적 : 460㎡(지상1, 지하1)/종합안내소, 카페테리아, 세미나실 등

◦ 한국의 고도와 익산 학술대회 개최(통합전수관)  : 2017. 12. 6.

2. 고도 이미지 찾기 사업 추진현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 고도지구 내(금마면 소재지 일원)

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년

◦ 사 업 비 : 10,128백만원(국비 7,090  도비 912  시비 2,126)

▸당해예산 : 2,457백만원 / 이월예산 : 2,857백만원

◦ 내    용 : 한옥, 담장·대문, 가로변 건축물 외관정비 등 주민지원

익산고도 가로변외관정비를 위한 경관기본설계용역 1식

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 고도보존 및 육성에 관한 조례 개정	: 2015.  2. 27.

◦ 고도보존육성 관리지침 발령	: 2015.  4. 30.

◦ 고도 이미지 찾기사업 캠페인 광고(금강방송)	: 2017.  2. ~ 4.

◦ 한옥 건축 관망 주민 대상 한옥 활성화 단지 견학(40명) : 2017.  5. 11.

▸구례군 오미마을, 보성군 삼정마을

◦ 가로변 외관 개선사업 위한 경관기본설계 용역 준공	: 2017.  9.

◦ 고도 이미지 찾기 사업 추진 현황(한옥38 담장33)	: 2017. 12.

연도	사업신청자						사업신청 예정자			사업희망자 (토지매입 등 적극의사자)
	구분	계	준공	공사 중	지원 결정	재심의	계	설계 진행	토지 매입
2017	한옥	38	20	18	0	0	12	12	0	6
	담장	33	10	14	9	0	7	7	0

□ 금 후 계 획

◦ 고도 이미지 찾기사업 홍보	: 2018. 1. ~ 12.

▸언론 홍보(방송 및 보도자료) 및 지역주민 개별 홍보 실시

▸사업 의사 있는 주민에 대한 관리 : 전화 및 방문 홍보

3. 옥룡천 옛물길 회복사업 추진현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2018 (5년)

◦ 총사업비 : 7,800백만원 (국비 5,460  도비 1,170  시비 1,170)

◦ 사 업 량 : L=1.4㎞ (금마저수지 ~ 지방도720호)

◦ 사업내용

▸시설공사 : 기포장구간 재포장(L=1,466m), 교량리모델링(4개소),

신규 탐방로(L=400m), 천변공원(A=8,670㎡)

▸토지보상 : 58필지 10,019㎡  건물 25동

□ 추 진 실 적

◦ 하천기본계획변경 및 실시설계용역 완료	: 2013.  5. 15. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 주변 도시관리계획 변경용역 완료	: 2013. 11. 08. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 소규모 환경영향평가용역 완료   : 2013. 11. 13. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 옛물길 회복사업 편입토지 보상 추진 : 2014. 10. ~

▸토지 58필지(10,019㎡), 건물 25동 중 47필지(8,892㎡), 건물 21동 매입완료(86.5%)

◦ 2015년 시행계획 변경 승인(문화재청)           : 2015.  8. 13.

▸기존제방구간 재포장, 기존교량 리모델링, 신규 탐방로, 천변공원 조성

◦ 옥룡천 기존제방구간 탐방로 재포장공사 준공   : 2016.  2. ~ 6.

◦ 신규 탐방로 및 천변공원 조성공사 준공         : 2016. 12. ~ 2017. 12.

◦ 옥룡천 교량경관개선사업 추진 및 준공         : 2016. 12. ~ 2017.  9.

□ 금 후 계 획

◦ 옥룡천 보상완료 건물 철거(7동)                : 2017. 12. ~ 2018. 9.

4. 이주단지 조성사업 추진현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2012. 7. ~ 2017. 12.

◦ 총사업비 : 7,700백만원(국비 5,390, 도비 1,155, 시비 1,155)

◦ 조성규모 : 21,560㎡ (택지 25필지, 공공용지 2필지)

◦ 사업내용 : 이주단지 부지 및 기반시설(도로, 상․하수도 등) 조성

□ 추 진 실 적

◦ 추진계획보고 및 공유재산관리계획 승인        : 2013. 4. ~ 2013. 5.

◦ 1차 이주대상자 주민공청회 추진               : 2013. 5. 14.

◦ 이주단지 조성사업구간 보상 추진              : 2013. 5. ~

▸편입토지 : 37필지 21,251㎡ / 건물10동

▸협의매입 : 30필지 18,898㎡ / 건물 7동 (90.6%)

◦ 이주단지 개발계획 수립 및 실시설계용역 시행  : 2013. 11. ~ 2014.  7.

◦ 이주단지 문화재 시·발굴조사 완료             : 2013. 12. ~ 2015.  2.

◦ 이주자택지(철거민) 6필지 분양               : 2017.  4. ~ 2017.  12.

◦ 일반분양 2필지 분양                          : 2017.  5.

□ 금 후 계 획

◦ 일반분양 13필지 분양 추진                    : 2018.  5. ~ 2018. 9.

5. 문화유산 보존정비 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 총사업비 : 39개 사업 11,885백만원 (국비 7,079  도비 2,191  시비 2,615)

□ 유형문화재 보수정비 : 39개 사업 11,885백만원 (국비 7,079 도비 2,191 시비 2,615)

▸국가지정 : 왕궁리유적 정비 등 16개 사업 10,604백만원

▸도  지정 : 망모당 지붕보수 등 18개 사업 717백만원

▸기    타 : 숭림사 보광전 재난방지시스템구축 등 5개 사업 564백만원

□ 추 진 실 적

□ 정비사업 설계용역 등 추진	: 2017. 1. ~ 4.

□ 문화재청 및 전북도 설계승인	: 2017. 3. ~ 5.

□ 정비사업 추진	: 2017. 4. ~

▸완료 28건, 시행중 11건

□ 정비사업 완료	: 2017. 12.

(단위 : 건)

구 분	건수	내 용
계	39
사업완료	34	‣ 국가지정 문화재(12) : 제석사지, 연동리석조여래좌상, 미륵사지당간지주, 고도리석조여래입상, 익산쌍릉, 익산토성, 구이리농림학교 축산과 교사, 중앙동 구삼산의원, 구 익옥수리조합 사무소 및 창고, 함라마을 옛담장, 덕기동유적, 익산토성진입부 토지매입 ‣ 도지정 문화재(18) : 망모당, 함벽정, 이병기선생 생가, 심곡사 대웅전, 김안균 가옥, 이배원 가옥, 조해영 가옥, 여산숲정이 성지, 성당면 은행나무, 용안향교 대성전, 삼세오충열사, 혜봉원 대웅전, 미륵산성, 금마도토성, 문화재 관리(드론구입), 고종황제어진, 건륭15년명감로탱화, 건륭29년명감로탱화 ‣ 향토유적(1) : 함열현 관아터 ‣ 전통사찰(3) : 숭림사보광전 방재시설, 사자암 방염, 남원사 방재시스템
계속사업 지속추진	5	‣ 국가지정 문화재 : 왕궁리유적 후원영역정비(2), 미륵사지 정비(2), 제석사지 정비

□ 문화재 보수정비 사업

(단위 : 백만원)

구분	문 화 재 명 (사업명)	사업내용	사 업 비	추진사항
				설계중	설계승인	공사중	완 료
계	39개 사업		11,885			11	28
세계유산보존관리	4개 사업		6,553			4
	왕궁리유적 정비	후원영역 및 궁궐담장 정비	4,187			⚪
		왕궁리유적발굴조사(공기관대행)	300			⚪
	미륵사지 정비	미륵사지 기단부 및 배수로 정비 등	1,466			⚪
		미륵사지복원연구 (공기관대행)	600			⚪
국가 지정 문화재	12개 사업		4,051			4	8
	제석사지정비	동서건물지, 회랑지, 폐기장정비 토지매입	643				⚪
	연동리석조여래좌상 원형복원 학술조사	원형복원 학술조사	100			⚪
	미륵사지 당간지주 정밀안전진단	당간지주 정밀안전진단	20				⚪
	고도리 석조여래입상 정밀안전진단 및 정비	서측여래입상 정밀안전진단 및 탐방로정비	150				⚪
	익산쌍릉발굴조사	쌍릉 발굴조사	337			⚪
	익산토성정비	토성 내부 발굴지 정비	500				⚪
	구이리농림학교 축산과 교사정비	기초부 및 주변 포장 보강 노후훼손 조적벽체 보수	150				⚪
	중앙동 구삼산의원 이전 복원	이전 및 복원정비	2,000			⚪
	구 익옥수리조합 사무소 및 창고 정비	지붕 및 외벽 보수	60				⚪
	함라마을 옛담장 정비	노후담장보수	50				⚪
	익산 덕기동유적 시굴조사	토지임차료	10				⚪
		시굴조사	10
	익산토성진입부토지매입	2필지, 1,454㎡	21			⚪
도지정 문화재	18개 사업		717			1	17
	망모당 지붕보수	기와보수 및 고르기	45				⚪
	함벽정 정밀실측 및 정비	석축⋅기단보수,수목간벌, 정밀실측	101				⚪
	이병기선생생가 정비	초가이엉잇기 및 굴뚝보수 사랑채⋅행랑채 기단보수	40				⚪
	심곡사 대웅전 주변정비	대웅전 석축보수, 명부전 기단보수	150				⚪
	김안균가옥 재난방지시스템 구축	재난방지시스템구축(방범,소화)	37				⚪
	이배원가옥 정비 및 재난방지시스템 구축	배수로정비, 기단보수 재난방지시스템구축(방범,소화)	28				⚪
	조해영가옥 정비 및 재난방지시스템 구축	창호 및 난간보수 재난방지시스템구축(방범,소화)	53				⚪
	여산숲정이성지 정비	부지성토 및 안정화	50				⚪
	성당면 은행나무 외 3개소 정비	수목치료 및 유지관리	5				⚪
	용안향교 대성전 주변정비	충효관 및 내삼문 기와고르기	26				⚪
	삼세오충열사 주변 정비	담장 및 주차장정비, 방범CCTV설치	39				⚪
	혜봉원 대웅전 기단 보수	대웅전 기단보수	20				⚪
	미륵산성 정비	건물지보수설계	28				⚪
	금마도토성발굴조사	발굴조사	35				⚪
	문화재 관리	문화재 관리용 장비(드론)구입 등	10				⚪
	고종황제어진 보존처리	고종황제어진 정밀조사 및 보존처리, 보관함 제작	30			⚪
	건륭15년명감로탱화 과학적조사	건륭15년명감로탱화의 보존을 위한 과학적조사(훼손도 등)	10				⚪
	건륭29년명감로탱화 과학적조사	건륭29년명감로탱화의 보존을 위한 과학적조사(훼손도 등)	10				⚪
향토 유적	2개 사업		322			2
	함열현 관아터 정비 및 활용 연구용역	관아터 위치 및 복원정비 범위와 활용계획 수립	30			⚪
	여산숲정이순교성지 정비	성토 및 토지안정화	292			⚪
전통 사찰	3개 사업		242				3
	숭림사 보광전 방재시설 구축	문화재 재난방지시설 구축	80				⚪
	사자암보수정비	대웅전 등 방염처리	48				⚪
	남원사 방재시스템구축	전통사찰방재시스템구축	114				⚪

6. 익산 국가무형문화재 통합전수교육관 운영 실적

□ 시 설 개 요

◦ 위    치 : 익산대로21길 1-9 (김동문 배드민턴장 인접)

◦ 개 관 일 : 2016. 9. 22.(준공일 2016. 8. 10.)

◦ 규    모 : 연면적 3,919.45㎡ (지상2층 지하1층)

◦ 건 립 비 : 8,200백만원 (국비 3,300, 도비 2,450, 시비 1,950, 특별교부세 500)

실내공연장	다목적 소공연장	세미나실	그 외	비 고
358.11㎡ (164석)	97.06㎡	77.14㎡ (42석)	사무실 외 3387.14㎡

◦ 주요시설

□ 입주단체 현황

단체명	지정구분	지정현황	회원수	비 고
이리농악	국가무형문화재 제11-3호 (‘85.12.1)	보유단체 1 전수조교 3 (이수자 60명)	130여명 (회장 김익주)
이리향제줄풍류	국가무형문화재 제83-2호 (‘85.9.1)	보유단체 1 전수조교 2 (이수자 15명)	75여명 (회장:오석신)
시립풍물단		시립(상임)	15명

□ 운 영 실 적

◦ 무형문화재 연중 프로그램 운영	: 2017.  1. ∼ 12.

▸이리농악 사회교육(주2회) 및 상설공연(총4회)

▸이리향제줄풍류 사회교육(주1회) 및 상설공연(총5회)

▸이리농악 9개과정 / 이리향제줄풍류 5개과정 전수교육 실시

▸대한민국 농악축제(2017. 7. 1.∼7. 2.)

◦ 실내공연장 및 다목적 소공연장 등 대관 : 35건    : 2017.  1. ∼ 12.

▸유료(4건, 437,000원) 면제(31건)

7. 왕궁리유적 보수․정비 추진현황

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30번지 일원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2022 (16년)

◦ 사 업 비 : 24,800백만원(국비 17,300  도비 3,750  시비 3,750)

▸2012년 이전 : 발굴지(건물지) 정비, 종합정비계획 수립 등(4,900백만원)

▸2013년 이후 : 종합정비계획에 따라 발굴지 순차 정비(19,900백만원)

◦ 사업내용

▸후원 및 공방, 유적조경 및 탐방로, 남측 건물지 정비

▸발굴조사 및 복원고증연구 등

□ 추 진 실 적

◦ 발굴지 토지매입 및 발굴                       : 1989 ~ 현재

◦ 왕궁리 유적전시관 건립                        : 2002 ~ 2007

◦ 발굴 진행 및 완료지역 단계별 유적 정비 중     : 2007 ~ 현재

◦ 종합정비 추진현황

[ 1단계 정비 ] - 완료

- 사업기간 : 2007년 ~ 2012년

- 사 업 비 : 49억원(국비 34 도비 7.5 시비 7.5)

- 사업내용 : 발굴 완료지역 유적정비, 종합정비계획 수립

▸건물지 정비, 궁장(남측, 동측일부) 복원, 안내판 설치, 종합정비계획 등

[ 2단계 정비 ] - 진행중

익산 왕궁리유적 종합정비계획 (2012년 수립)

총사업비 199억원(국비 139억원, 지방비 60억원)

1단계(단기, 2013∼2018년) : 103억원	2단계(중기, 2019∼2022년) : 96억원
▸토지매입 및 원형 규명을 위한 발굴조사 ▸궁궐담장 및 문지 복원 정비 (동,서,남,북) ▸공방영역 및 정원유적 정비(후원 포함) ▸문화재구역 확대 및 토지매입 등	▸정원유적 및 후원영역 정비 ▸왕궁리 유적 조경공사 및 지중화 사업 ▸편익시설 정비 (주차장, 탐방로 및 광장, 배수시설 등) ▸주변 조경, 편의시설 (화장실, 휴게 ․안내소)

□ 금 후 계 획

◦ 왕궁리유적 종합정비계획에 의한 정비 지속 추진   : 2019년 ~ 2022년