2018.  10.

제212회 익산시의회(제1차 정례회)

2018행정사무감사자료

전국체전담당관

전 국 체 전 담 당 관

	□		감사자료 과 공통사항
			1.	2017년도 업무성과 및 반성 ……………………	5
			2.	2017년도 예산집행 및 추진사항 ………………	6
			3.	2017년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 …	7
			4.	2017년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과 …	7
			5.	시정질문에 대한 조치 결과 ……………………	8
			6.	주요사업 조서(3천만원 이상) …………………	8
			7.	2017년도 각종 민원(진정․건의․청원 등) 접수 처리내역 …	9
			8.	기금 운용 관련 ……………………………………	9
			9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 ……………	10
			10.	용역사업 관련 ……………………………………	11
			11.	인․허가 민원관련 ………………………………	12
			12.	각종공사 설계변경 상황 ………………………	13
			13.	건설공사 집행 현황(3천만원이상) ……………	14
			14.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………	15
			15.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상) ………	15
			16.	2017년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 …………	16
			17.	2018년도 명시이월 내역 ………………………	17
			18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 ……………	17
			19.	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	18
			20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	18
			21.	국․도비 반납 현황 및 사유(2016년도 반납건)………	19
			22.	2017년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	19
			23.	2017년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업 현황 ……………	20
			24.	2017년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 ……………	20
			25.	2017년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ………	21
			26.	소송 사건 현황 ………………………………………	21
			27.	시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ………	22

	□		감사자료 과 요구사항
			1.	전국체전 운영 현황	…………	25
			2.	전국체전 종합운동장 개선공사	…………	26
			3.	전국체전 숙박시설 확충 현황	…………	27
			4.	전국체전 개‧폐회식 주차장 확보 현황	…………	28

감사자료 과 공통사항

1. 2017  업무성과 및 반성

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

□ 성     과

◦ 2018년 성공적인 체전준비를 위한 기반 구축

▸2018 전국(장애인)체전 종합운동장 개선공사 착공 및 공사추진	:	2017. 3.~12.
▸2018 전국(장애인)체전 로고송 선정	:	2017. 5.
▸2018 전국(장애인)체전 기본계획 수립 및 배부	:	2017. 9.
▸2018 전국장애인체전 채화장소 확정(미륵사지)	:	2017. 9.
▸2018 전국체전 D-365기념행사 개최	:	2017. 10.
▸2018 전국(장애인)체전 홍보 동영상 제작	:	2017. 10.
▸2018 전국체전 성공개최기원 시민 걷기대회 개최	:	2017. 11.
▸대한육상연맹 1차 공인 완료 (육상트랙 아스콘 포장 등)	:	2017. 11.
▸대한체육회 종합운동장 1차 사전점검 완료 (본부석 및 주요시설)	:	2017. 11.

◦ 공공체육시설 공모사업 선정 및 경기장 개선공사비 확보–지방재정확충 기여

▸종합운동장 및 보조경기장 우레탄 교체사업 선정(공모) : 932백만원(국비)

▸시설개선사업          : 500백만원(도 특별조정교부금)

◦ 2018 전국체전 시민서포터즈 구성․운영

▸구 성 : 2018명(남 1,148명, 여 870명)

▸운 영 : 각종 체육, 문화행사 시 전국(장애인)체전 홍보 12회 850여명

◦ 2018 전국(장애인)체전 익산시 운영위원회 구성․운영

▸구  성 : 77명 <위원장 : 시장(당연직)>

▸운영위원회 창립총회 개최 : 2017. 11. 22.

◦ 전국 5대체전 지역경제 파급효과 연구 용역

▸생산유발액 1,591억원  ▸부가가치유발액 655억원   ▸고용유발인원 2,617명

∙ 전국체전․전국장애인체전(2018.10.)   ∙ 전국소년체전․전국장애학생체전(2019.05.)

∙ 전국생활체육대축전(2020.06.)

2. 2017 예산집행 및 추진사항

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

【 2017. 12. 31현재 】

(단위 : 천원, %)

부서	정책		단위			세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
전국체전담당관							40,372,978	15,867,544	24,505,434	39.3
	2018년 전국체전						40,364,978	15,859,544	24,505,434	39.3
		2018년 전국체전 기반시설					40,070,079	15,570,700	24,499,379	38.8
					전국체전시설건립		35,566,079	13,820,700	21,745,379	38.8	명시 9,254 사고 462
					공공체육시설 장애인 편의시설 설치사업		2,140,000	1,750,000	390,000	81.7	명시 2,140
					공공체육시설 개보수지원 (우 레 탄 교 체)		1,864,000	0	1,864,000
					익산실내체육관 시설개선사업		500,000	0	500,000
		2018년 전국체전 대회운영					294,899	288,844	6,055	97.9
					전국체전기획운영		294,899	288,844	6,055	97.9
	행정운영경비						8,000	8,000	0	100
	기본경비						8,000	8,000	0	100
				기본경비			8,000	8,000	0	100

3. 2017년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

4. 2017년도 상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

연번	공 사 명	지적사항	조치(처리)결과	수감기관	비고
1	익산종합운동장 개선공사	기계공사(공기조화기 히터) 및 건설폐기물(폐토석) 처리 물량 과다 계상	공사비 및 용역비(40,254천원) 감액처리	전라북도

5. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

6. 주요사업 조서 (3천만원 이상)

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

※  13. 건설공사 집행 현황과 같음

7. 2017년도 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

8. 기 금  운 용  관 련

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□

▣ 위원회 설치현황

위원회명	설치근거	구성원수	심의․의결․ 자문 기능여부	비고
전국(장애인)체전 운영위원회	전국종합체육대회규정 제27조, 전국장애인체육대회규정 제24조	77	여

▣ 각종위원회의 운영예산

위원회명	운영횟수	위원수당 지급내역		비고
		수당(천원)	금액(천원)
전국(장애인)체전운영위원회	1	70	3,500

▣ 각종 위원회에서 심의하여 단체장의 의견이 수정된 사례

해 당 사 항   없 음

▣ 단체장이나 부기관장을 위원장으로 선임하고 있는 위원회

위 원 회 명	위 원 장	비 고
전국(장애인)체전 운영위원회	시 장

▣ 각종 위원회 예산현황 및 예산편성 기준

위원회명	예산현황(천원)	예산편성기준	비고
전국(장애인)체전 운영위원회	9,800	전국종합체육대회규정 제27조, 전국장애인체육대회규정 제24조

▣ 법령이나 조례의 근거없이 설치되어 있는 위원회 및 회의회수 및 소요예산

해 당 사 항   없 음

10.  용  역  사  업  현  황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

(단위: 천원)

구분	용 역 명	용역비	용역업체	용역기간	계약방법	비고
설계 용역	익산종합운동장개선공사 설계용역	636,400	공간건축사외3	2016.1.4. ~ 2017.1.13.	조달청 제안공모입찰
감리용역	익산종합운동장 개선공사 건설사업관리용역	897,940	목양건축사사무소 외1	2017.3.14. ~ 2018.9.30.	조달청 공개경쟁입찰
감리 용역	익산종합운동장개선공사 전기감리용역	209,546	주)다우코페레이션	2017.3.15. ~ 2018.7.30.	조달청 공개경쟁입찰
감리 용역	익산종합운동장개선공사 통신감리용역	22,977	(유)광진이엔지	2017.3.15. ~ 2018.7.30.	조달청 공개경쟁입찰
감리 용역	익산종합운동장개선공사 소방감리용역	13,583	(유)광진이엔지	2017.3.15. ~ 2018.7.30.	익산시 공개경쟁입찰
감리용역	익산종합운동장 개선공사 석면해체 감리용역	29,964	주식회사 하늘석면기술연구원	2017.3.20. ~ 2017.5.29.	익산시 공개경쟁입찰
기술용역	익산종합운동장 개선공사 석면비산정도 및 공기중 농도측정용역	9,870	주식회사 하늘석면기술연구원	2017.3. 9. ~ 2017.5.19.	수의계약
기술용역	익산종합운동장 개선공사 건설폐기물 처리용역	329,864	(유)대한이앤이	2017.3.20. ~ 2018.8.30.	조달청 공개경쟁입찰
기술용역	익산종합운동장 개선공사 가연성폐기물(합성수지)처리용역	90,928	(주)영흥산업환경	2017.3.20. ~ 2017.12.7.	조달청 공개경쟁입찰
기술용역	익산종합운동장 개선공사 석면운반 및 처리용역	54,192	세창산업	2017.4.6. ~ 2017.5.29.	익산시 공개경쟁입찰
기술용역	익산종합운동장 실내체육관 석면비산정도 및 농도측정용역	4,639	주식회사 하늘석면기술연구원	2017.5.4. ~ 2017.5.19.	수의계약

11. 인․허가  민원관련

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

12. 각종공사 설계 변경상황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

(단위 : 백만원)

일자	사업명	사업개요	공 사 비		계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경
	4 건		19,704	24,819
2017. 5. 8.	익산종합운동장 개선공사 석면해체공사	주경기장 및 실내체육관 석 면 철 거 13,470㎡	281	381	(유)국제산업	2017.3.23.~ 2018.6.13.	∙누락면적 추가 반영 및 설비배관 교체 등 무석면 사업장 추진
2017. 11.11	익산종합운동장 개선공사(전기)	주경기장 및 실내체육관 전 기 공 사 1 식	2,338	2,379	(주)금화전기	2017.3.20. ~ 2018.7.30.	∙동력설비추가에 따른 수변전설비 증설 및 실내체육관 노후 조명 교체
2017. 11.27	익산종합운동장개선공사(건축)	주경기장 및 실내체육관 보조경기장, 부대시설 1 식	16,225	21,083	흥한건설(주)	2017.3.30.~ 2018.9.30	∙육상경기장 공인에 필요한 시설변경 ∙장애인체전대비 실내 체육관 개선 ∙설계도서와 상이한 사항 변경
2017. 12. 4.	익산종합운동장 개선공사(소방)	주경기장 및 실내체육관 소 방 공 사 1 식	860	976	(유)대성전기 공 업 사	2017.3.20.~ 2018.7.30.	∙주경기장 소방서 협의사항 반영 및 실내체육관 노후 설비 교체

13. 건설공사 집행 현황 (3천만원이상)

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	예산액	집행액	사업기간	집행률 (%)	비고
6 건		21,266	13,268		62.4
익산종합운동장 개선공사(소방)	전국체전경기장 리모델링 1식	976	401	2017.3.20. ~ 2018.7.30.	41.1
익산종합운동장 개선공사(통신)	전국체전경기장 리모델링 1식	847	378	2017.3.20. ~ 2018.7.30.	44.6
익산종합운동장 개선공사(전기)	전국체전경기장 리모델링 1식	2,379	1,595	2017.3.20. ~ 2018.7.30.	67.0
익산종합운동장 개선공사(건축1차)	전국체전경기장 리모델링 1식	10,000	7,350	2017.3.20. ~ 2018.9.30.	73.5
익산종합운동장 개선공사(건축2차)	전국체전경기장 리모델링 1식	6,704	3,184	2017.7.7. ~ 2018.9.30.	47.5
익산종합운동장 개선공사(석면해체공사)	석면철거 1식	360	360	2017.3.24. ~ 2017.5.31.	100

14. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□

(단위 : 천원)

대 상 자	사업내용	집 행 액	보조근거
익산시체육회	전국체전 시민서포터즈 운영	53,866	익산시 지방보조금 관리조례

15. 국․도비 보조사업 집행현황 (1억원이상)

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

(단위: 백만원)

사 업 명	예 산 액				집 행 액				비고
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
계	39,570	13,491	9,299	16,780	15,570	5,556	4,341	5,673
전국체전시설건립	35,566	11,059	9,299	15,208	13,820	4,329	4,341	5,150
공공체육시설장애인 편의시설 설치사업	2,140	1,500	0	640	1,750	1,227	0	523
공공체육시설개보수 지원(우레탄 교체)	1,864	932	0	932	0	0	0	0

16. 2017년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

□ 이월사업 개요	3건 11,856백만원

◦ 명 시 이 월  :  2건  11,394백만원

◦ 사 고 이 월  :  1건    462백만원

□ 명시이월사업

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예산액	집행액	잔액	집행율 (%)	비고
계		11,394	9,599	1,795	84.2
전국체전시설건립	익산종합운동장 개보수	9,254	7,849	1,405	84.8
공공체육시설 장애인 편의시설 설치사업	장애인편의시설 설치(EV,화장실등)	2,140	1,750	390	81.7

□ 사고 이월사업

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예산액	집행액	잔액	집행율 (%)	비고
계		462	462	0	100
전국체전시설건립	익산종합운동장개보수	462	462	0	100

17. 2018년도 명시이월 내역

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

□ 명시이월사업

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	사업기간	예산액	집행액	이월액	비고
계	3건		28,214	5,510	22,704
전국체전시설건립	익산종합운동장(실내 체육관, 보조경기장 포함) 및 종목별 경기장 개보수	2016.1 ~ 2018.9.	25,850	5,510	20,340
공공체육시설 개보수지원 (우 레 탄 교 체)	익산종합운동장 (보조경기장 포함) 우레탄트랙 교체	2017.10 ~ 2018.8.	1,864	0	1,864
익산실내체육관 시설개선사업	익산 실내체육관 전광판 교체	2017.10 ~ 2018.9.	500	0	500

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산 현황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

21. 국․도비 반납 현황 및 사유 (2017년도 반납 건)

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

22. 2017년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

23. 2017년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

24. 2017년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

25. 2017년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

26. 소   송   사   건   현   황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

해     당     없     음

27. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□

□ 민원접수 현황

부 서 명	시 정 에 바 란 다		비 고
	접수(건)	처리(건)
전국체전담당관	1	1

□ 주요처리현황

◦ 2018 전국(장애인)체전 홍보 민원 :  1 건

□ 주요처리내용

◦ 전국(장애인)체전 홈페이지 등 사이트를 통한 홍보 관련

⇒ 전국체전․전국장애인체전 홈페이지는 양대체전 주관인 광역자치단체

(전라북도)에서 구축하며, 구축완료 후 검색엔진 및 익산시 홈페이지

팝업창 또는 배너를 통해 홍보할 계획임.

감사자료 과 요구사항

1. 전국체전 운영 현황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전기획계장		윤성민	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□

□ 대회개요

◦ 2018년 제99회 전국체육대회     : 2018. 10. 12.~10. 18.(7일간)

▸참가인원 – 30,000여명(선수 20,000명, 임원 10,000명)

▸경기종목 – 14개 시·군 47개 종목(익산시 12개 종목/개·폐회식)

◦ 2018년 제38회 전국장애인체육대회 : 2018. 10. 25.~10. 29.(5일간)

▸참가인원 – 7,000여명(선수 5,000명, 임원 및 보호자 2,000명)

▸경기종목 – 12개 시·군 26개 종목(익산시 5개 종목/개·폐회식)

□ 추진실적

◦ 전국체전담당관 신설                                   : 2017. 1.

◦ 전국(장애인)체전 성공개최 유관기관(단체) 업무협의     : 2017. 2.

◦ 전국(장애인)체전 주 개최지 벤치마킹(강릉, 아산, 충주)  : 2017. 2.~ 6.

◦ 전국(장애인)체전 부서별 추진계획 보고회 개최          : 2017. 2.~10.

◦ 전국(장애인)체전 익산시 운영위원회 구성               : 2017. 5.

◦ 전국(장애인)체전 로고송 선정                          : 2017. 5.

◦ 전국(장애인)체전 시민서포터즈(2018명) 구성 및 홍보    : 2017. 5.~12.

◦ 전국장애인체전 채화장소 확정(미륵사지)                : 2017. 9.

◦ 전국(장애인)체전 기본계획 수립 및 배부(시,유관기관 등) : 2017. 9.

◦ 전국(장애인)체전 D-day 카운터기 설치             : 2017. 10.

◦ 시민과 함께하는 전국체전 D-365 기념행사 개최     : 2017. 10.

◦ 전국(장애인)체전 익산시운영위원회 창립 회의 개최      : 2017. 11.

□ 금후계획

◦ 2018 제99회 전국체육대회 개최    : 2018. 10. 12.~2018. 10. 18.

◦ 2018 제38회 전국장애인체육대회 개최    : 2018. 10. 25.~2018. 10. 29.

2. 전국체전 종합운동장 개선공사

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전시설계장		김경식	□

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 익산 종합운동장 개선공사

◦ 위    치 : 익산시 무왕로 1397(익산종합운동장)

◦ 공사기간 : 2017. 3. ~ 2018.  9.

◦ 공 사 비 : 32,533백만원(국비 10,073, 도비 9,048, 시비 13,412)

◦ 대상시설

구 분	주 경기장	실내체육관	보조경기장	비고
연 면 적	13,684㎡	18,978㎡	20,500㎡
준공년도	1991년	1997년	2008년
용 도	관람집회시설	관람집회시설
수용인원	15,000명 (당초18,000명)	5,500명 당초6,000명)

◦ 공사내용 : 주 경기장, 실내체육관, 보조경기장 개보수

□ 추진 실적

◦ 익산 종합운동장 개선공사 계약 및 착공    : 2017. 3.

◦ 익산 종합운동장 개선공사 추진            : 2017. 12월 공정률 70%

▸완료공정 : 구조보강, 기존시설물 철거, 스탠드방수, 외부치장 벽돌쌓기,

육상 제1종 공인(1차), 성화대설치 완료

▸추진공정 : 종합상황실, 시도상황실, 관람석의자․전광판 설치,

내·외부 도장 공사, 전기, 통신, 소방, 설비 공사

□ 금후 계획

◦ 2018 제99회 전국체육대회 개최    : 2018. 10. 12.~2018. 10. 18.

◦ 2018 제38회 전국장애인체육대회 개최    : 2018. 10. 25.~2018. 10. 29.

3. 전국체전 숙박시설 확충 현황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□

□ 현    황

◦ 숙박시설

구 분	총 계	숙 박 업				청 소 년 수련시설	농어촌 민박	비 고 (농촌체험 휴양마을)
		소계	관광호텔	여관업	굿스테이
업소수	205	182	2	179	1	1	17	5
객실수	4,593	4,469	78	4,360	31	40	45	39
수용능력	9,622	8,938	156	8,720	62	248	190	246

※ 숙박시설 세부추진 계획 위생과 별도 수립 추진

◦ 숙박 현황 예상 분석(80% 가동률)

숙박예상 인원	수용가능 인원 (9,622명 × 80%)	부 족	비 고
8,500명	7,700명	800명

□ 추진실적

◦ 전국체전대비 숙박업소 현황조사(위생과)               : 2017. 1

◦ 숙박업소 사업주 전국체전 대비 교육(위생과)            : 2017. 4.

◦ 컨벤션 호텔 신축 공사 착공(투자유치과)                : 2017. 6.

◦ 구) 원광보건대학교 함열 2캠퍼스 기숙사 추가 확보         : 2017. 12.

▸136실 275명 수용

□ 금후계획

◦ 2018 제99회 전국체육대회 개최    : 2018. 10. 12.~2018. 10. 18.

◦ 2018 제38회 전국장애인체육대회 개최    : 2018. 10. 25.~2018. 10. 29.

4. 전국체전 개․폐회식 주차장 확보 현황

확인자	:	전국체전담당관		김성도	□
작성자	:	체전운영계장		허민석	□

□ 사업개요

◦ 개·폐회식 주차편의 제공으로 주차난 해소 및 원활한 차량소통 도모

◦ 주차수요(예상)

필요면수	주차장 운영			비 고
	계	종합운동장	임시주차장
4,400	5,341	1,100	4,241

□ 추진실적

◦ 임시 주차장 확보 추진

구 분	규 모	산출근거	설치면수	비고
계			4,241
종합운동장 내 야적장 및 신재생자원센터 주변 도로	18,465㎡	15㎡/대	1,231
원광고등학교 및 진입도로	6,600㎡	15㎡/대	440
팔봉3공원 내 축구장 및 주변도로	27,600㎡	15㎡/대	1,840
종합운동장 흙 야구장 및 팔봉초	10,950㎡	15㎡/대	730

□ 금후계획

◦ 2018 제99회 전국체육대회 개최    : 2018. 10. 12.~2018. 10. 18.

◦ 2018 제38회 전국장애인체육대회 개최    : 2018. 10. 25.~2018. 10. 29.