건  설  과

	□		감사자료 과 공통사항
			1.	2017년도 업무성과 및 반성 ……………………	63
			2.	2017년도 예산집행 및 추진사항 ……………	64
			3.	2017년도 행정사무 감사시 지적사항에 대한 조치 결과 ……	66
			4.	2017년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과 ……	69
			5.	시정질문에 대한 조치 결과 …………………………	70
			6.	주요사업 조서(3천만원 이상) …………………	71
			7.	2017년도 각종 민원(진정․건의․청원 등) 접수 처리내역 …	72
			8.	기금 운용 관련 …………………………………	74
			9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 ……………	74
			10.	용역사업 현황 ………………………………	75
			11.	인허가 민원 관련 ……………………………………	77
			12.	각종공사 설계 변경상황 …………………………	78
			13.	건설공사 집행현황(3천만원이상) ………………	80
			14.	민간에대한 보조금 집행내역 ………………………	83
			15.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상) ………	84
			16.	2017년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 …	85
			17.	2017년도 예산중 2018년 명시 및 사고이월내역 ……	86
			18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 …………	87
			19.	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	88
			20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	88
			21.	국․도비 반납 현황 ………………………………	89
			22.	2017년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	89
			23.	2017년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황 ……	90
			24.	2017년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 ………	90
			25.	2017년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ………	91
			26.	소송사건현황 ………………………………………	92
			27.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ………	93

	□		감사자료 과 요구사항
			1.	공익사업을 위한 용지보상	………	97
			2	2017년도 시군도·농촌도로 확·포장사업	………	98
			3.	군도23호선 도로확·포장사업	………	100
			4.	평화육교 재가설사업	………	101
			5.	왕궁천 하천 정비사업	………	102
			6.	동명천 하천 정비사업	………	103
			7.	소하천 정비사업(대판천)	………	104
			8.	만경강 문화관 조성사업	………	105
			9.	국가하천 유지관리사업	………	106
			10.	지방하천정비(하천제방 유지보수)	………	107
			11.	도로조명 조도개선	………	108
			12.	도로조명 고장민원 처리내역	………	109

감사자료 과 공통사항

1. 2017 업무성과 및 반성

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 성    과

◦ 평화육교 재가설로 호남선 KTX 완전개통과 안전한 교통망구축

▸ 평화육교 재가설 착공	: 2017. 7. 18

- 공사기간 : 2017. 7. 18 ~ 2020. 7. 17

▸ 보상계획 열람공고 및 손실보상	: 2017. 9 ~ 12

- 손실보상 대상 : 토지 28필지 6,397㎡, 지장물 23건

▸ 목천지역 상가(소상공인) 민원해소로 상생발전 도모	: 2017. 7 ~ 12        - 대체우회도로(L=1.1km) 계획 변경(2차로→4차로)

◦ 군도 교행차로 및 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민편익 증대(3개사업 준공)

▸ 군도19호선 교행차로 설치

- 교행차로 8개소 L=0.61㎞, B=0.7-2.7m,- 교행차로 준공 및 개통 : 2017. 11. 21

▸ 춘포 학연~익산천제방간 도로확포장

- 도로확포장 L=0.74㎞, B=8.0m, - 도로확포장 준공 및 개통 : 2017. 11. 17

▸ 오산 북영선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.73㎞, B=8.0m, - 도로확포장 준공 및 개통 : 2017. 8. 14

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 환경 친화적 하천 정비로 재해예방 및

시민 친수공간 조성

▸ 대판천 소하천정비사업 총사업비 증액 : 1,600 → 3,057백만원(증 1,457)

- 국비(728백만원) 추가 확보로 원활한 소하천정비 추진

◦ 보안등 설치로 밝은거리 조성하여 여성,노약자 등에게 안전한 보행 환경조성

▸보안등 신규설치 384개소, 노후가로등 정비 665개소, 가로등,보안등 민원처리 5,200건

2. 2017 예산집행 및 추진사항

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□

【 2017. 12. 31현재 】                                                    (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
건설과				31,808,971	15,695,923	16,113,048	49
	도로시설관리			18,450,082	10,490,174	7,959,908	57
		시군농어촌도로확포장		8,654,202	2,680,520	5,973,682	31
			금마갈산~서편간 도로확포장공사	50,000	44,482	5,518	89
			용동 삼정~두무간 도로확포장공사	1,629,210	446,853	1,182,357	27	명시이월 사고이월
			오산북영선(금몽-남전)확포장공사	805,380	727,968	77,412	90
			망성신성-관산간 도로확포장사업	200,000	7,144	192,856	4	명시이월
			오산장신-만석간 도로확포장	200,000	0	200.000	0	명시이월
			미불용지매입비 (시군농어촌도로)	100,000	32,648	67,352	33	명시이월
			용안창리법성간 도로확포장	200,000	0	200,000	0	명시이월
			금마누동-신촌간 도로확포장공사	100,000	7,228	92,772	7	명시이월
			시군농어촌도로 확포장 사업추진	5,000	5,000	0	100
			군도23호선 도로확포장공사	4,806,521	920,775	3,885,746	19	명시이월
			춘포학연 익산천 제방간도로확포장공사	458,091	457,116	975	99.7
			오산외용(외검선) 도로확포장공사	100,000	31,306	68,694	31	명시이월
		교통관리 개선사업		384,000	231,078	152,922	60
			군도19호선 (하발-신평교차로 교행장소설치)	234,000	231,078	2,922	98.8
			낭산 석천 삼거리 도로 구조개선	150,000	0	150,000	0	명시이월

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
		철도건널목개량사업		5,436,000	3,740,506	1,695,494	69
			평화육교재가설	5,103,000	3,650,655	1,452,345	72	사고이월
			국도23호 오산교차로 램프설치	333,000	89,851	243,149	27	명시이월
		도로조명시설관리		3,937,120	3,799,311	137,809	96
			보안등신규설치	585,540	585,078	462	99.9
			노후가로등정비	698,140	609,726	88,414	87	명시이월
			가로등보안등유지관리	2,597,780	2,588,542	9,238	99.6
			가로등보수차량운영유지비	18,660	15,965	2,695	86
			주민편익증진사업 (가로등·보안등설치)	37,000	0	37,000	0	명시이월
		주민숙원사업		38,760	38,760	0	100
			주민숙원사업	38,760	38,760	0	100	공통여비및업무추진비
	하 천 정 비			13,028,793	4,877,085	8,151,708	37
		하천정비 및 유지관리		13,028,793	4,877,085	8,151,708	37
			하천제방유지보수	1,182,899	49,605	1,133,294	4	명시이월
			하천제방유지보수(자체)	1,029,828	940,657	89,171	91
			국가하천유지보수(4대강)	595,222	151,340	443,882	25	명시이월 사고이월
			소하천정비(생활)	2,540,156	590,033	1,950,123	23	명시이월
			국가하천유지관리(4대강외)	294,312	128,762	165,550	44	명시이월
			왕궁천하천정비사업	4,746,376	2,646,972	2,099,404	56	계속비이월
			동면천하천정비사업	800,000	369,716	430,284	46	계속비이월
			지방하천정비(자체)	40,000	0	40,000	0	명시이월
			하천정비및유지관리 (해지천)	500,000	0	500,000	0	명시이월
			만경강물문화관진입 도로개설공사	1,300,000	0	1,300,000	0	명시이월
	재무활동(보전지출)			267,902	266,971	931	99.6
			국고보조반환금	55,000	54,084	916	98
			시도비보조반환금	12,902	12,887	15	99.8
			내부거래지출	200,000	200,000	0	100	공기업특별회계 자본전출금
	행정운영경비			62,194	61,693	501	99
			인력운영비	35,000	34,499	501	99
			기본경비	27,194	27,194	0	100

3. 2017 행정사무 감사시 지적사항에 대한 조치결과

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
1	•용역 사업에 대하여 ▸각종 설계시 용역을 추진하고 있는데 설계변경이 없도록 용역 감독을 철저히 하시기 바라며, 예산을 절감할 수 있도록 자체설계단을 운영 하기 바람.	▸용역설계에 대하여는 감독을 철저히 하겠으며, 기술용역이 어려운 시.군도 도로확포장 및 하천정비 사업 외 소규모 사업은 자체 설계하여 예산이 절감될 수 있도록 노력하겠음.
2	•설계변경 및 명시이월에 대하여 ▸공사금액 상승이 물가상승 및 인건비 상승으로 인한 것은 아니며, 설계변경으로 인하여 사업비가 증가되고 있음에 따라 구체적으로 사업내용 변경이 최소화 될 수 있도록 하기 바라며, ▸명시이월 사업이 많은데 효율적인 예산을 편성 하시기 바람.	▸민원에 의한 횡배수관 설치 등 현장여건변화로 인한 불가피한 경우를 제외하고는 예산이 낭비되지 않도록 설계변경을 지양 하겠으며 ▸공사시기에 맞추어 사업을 추진하여 명시이월 사업이 최소화 될 수 있도록 노력하겠음.

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
3	•농어촌도로 재정비 용역관련 ▸농어촌도로 재정비 용역후 관련 사업예산이 잘 편성될 수 있도록 노력바람.	▸농어촌도로 재정비와 관련 18년예산이 반영 편성될 수 있도록 노력하겠음
4	•농어촌도로 추진 관련 ▸현재 추진중인 23개 농어촌도로에 대해 우선순위를 가지고 예산확보 등을 노력해서 추진바람.	▸현재 추진중인 23개 농어촌도로에 대해 우선순위를 정하여 추진중에 있으나, 더욱더 우선순위를 가지고 집중 추진하도록 노력하겠음.
5	•가로등 관련 ▸가로등 신규설치시 현장여건 등을 검토하여 기준을 가지고 추진바람.	▸ 가로등 무분별한 설치를 예방하기 위해 조례를 개정(‘17.04.14)설치기준을 강화하여 개인의 영리 목적으로 신청하는지역(창고앞,비닐하우스앞,농경지앞),등산로, 학교내, 임도 등 보안등 설치목적과 무관한 장소에 대하여 제한하여 사업을 추진하겠음.
6	•가로등 관련 ▸가로등기구커버 내부 날벌레 또는 이물질로 빛의 밝기가 저하되고 있어 정비가 필요함.	▸ 등기구 커버가 탈색된 및 내부 이물질로 조도가 저하된 가로등에 대하여는 보수시 램프와 커버를 교체하고 있으며, 앞으로도 지속적으로 보수 정비하여 도미미관 개선과 밝은거리가 조성 될 수 있도록 노력하겠음.

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
7	•왕궁천 하천정비 공사 관련 ▸왕궁천 하천정비시 친환경적으로 추진바라며, 주민설명회 개최 바람. 또한 지방도722호 횡단구간에 대해 보석박물관과 연계성을 검토하기 바람.	▸왕궁천은 지방하천 설계기준에 적합하게 친환경적으로 설계하였고, ▸주민설명회는 2016. 6. 24. 1차, 2017. 10. 19. 2차 개최함. ▸지방도722호선(동용교) 횡단구간은 언더패스로 연결로 반영
8	•소송관련 ▸자료작성시 소송종결에 대한 결과가 누락되었으며,소송시 자문변호사를 활용하여 승소율을 높이기 바람.	▸자료작성시 소송결과에 대한 결과를 기재하겠으며, 소송시 자문변호사 자문을 수시로 자문하여 승소율을 높이겠음.
9	•소하천정비 관련 ▸소하천정비사업시 준설을 통해 하천기능을 살릴수 있도록 하기바람.	▸년도별 하천유지보수 사업계획에 의거 하천준설 및 하천유지관리에 대한 견문보고, 민원사항 등에 대하여 지속적으로 하천유지보수 및 관리하고 있음.
10	•금강생태하천 관련 ▸금강생태하천 기본계획 및 실시설계에 대해 미래농정국과 잘 협의해서 활용방안을 연계바람．	▸금강 생태하천 사업추진시 미래농정국과 협의하여 많은 탐방객들이 이용하고 활용할 수 있는 연계사업을 발굴·추진토록 하겠음．

4. 2017년도 상급기관 감사시 지적사항 및  조치 결과

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

연번	공 사 명	지적사항	조치 (처리) 결과	수감기관	비고

상급기관감사 지적사항이 없습니다.

5. 시정질문에 대한 조치결과

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

【관리번호 : 202 - 2 - 5 】

일 시	2017. 6. 13 (제202회 제1차정례회)	질문의원	김충영	답 변	시장
		설명일자	2017.6.13
제 목	만경강에 MTB 산악자전거 훈련장 및 드론훈련장 조성			소관부서	건설교통귝 (건설과)
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( ○ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 만경강에 MTB 산악자전거 훈련장 및 드론 훈련장 조성
▣ 답 변 내 용 ◦ 우리시의 만경강 하천환경정비사업 사업비는 2천여억원이 투자가 되며 2021년 사업준공 이후 만경강을 찾는 시민들을 위한 친수공간으로 거듭날 것임. ◦ 우리시에서는 추가사업 발굴을 위하여 시행중인 만경강 하천환경정비사업 및 공간관리계획 검토용역 과정에서 지역주민 및 시민단체, 관계전문가 등 다양한 의견수렴을 거쳐 MTB 및 드론훈련장 등을 포함한 종합계획을 수립, 익산지방국토관리청에 건의 국가사업에 반영하여 만경강을 찾는 관광객 및 시민들에게 다양한 친수공간 및 편익시설을 제공할 계획임. ▣ 금 후 계 획 ◦ 만경강 하천환경정비사업 및 공간관리계획 검토용역 추진중 : 2017. 06.~09. ◦ 검토용역 완료후 익산국토청 사업협의 및 건의 : 2017. 10.~12. ◦ 공사발주 및 추진( 익산국토관리청) : 2018. 10.~2020.12

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

항목 13. 건설공사 집행현황과 같습니다.

7. 2017년도 각종 민원(진정) 접수처리내역

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
계	8건
진정	-하천부지 불법 사항 시정 요구	임석홍	-석탄동(용강마을) 경작지 부근에 불법매립과 오물을 매립하여 원상복구 요청	- 우리시 강 살리기사업 시행에 따른 민원사항으로 조속한 시일내에 민원해소를 할 계획임을 통보
진정	- 미지급용지 보상요청	윤효명 윤석중	-지방도(799호)미불 용지 토지보상 요청	-상반기 일부 보상협의를 진행하여 보상금을 지급하였으며, 예산액이 부족하여 미지급된 부분은 예산확보 후 지급할 수 있음을 양해 통보
진정	- 굴착용 관정 기계 및 철재 파이프 치워 줄 것 요구	이봉수	-목천동 공용테니스장 옆 주차장에 지하수 굴착용 관정기계 및 철재 파이프. 치워 줄 것 요청	-현장을 방문하여 소유자 파악 후 조속한 시일 내에 치울 것을 통보 하였음.
진정	도로로사용하고있는 토지를 익산시에서 수용 요구	김주삼	-현재 도로로 사용하고 있는 용동면 대조리 166-3 ,166-7번지 익산시에서 수용하여 보상처리 요구	-해당도로는 80년대 이전부터 도로로 형성되었으며, 비법정도로(마을길,농로등)로 토지보상 대상토지가 아님을 알림

진정	평화육교 공사와 관련 영업이익 감소로 선처요구	고동희	▶영업배당금 ▶세제지원 및 은행 이자지연 ▶중앙분리대 3년간 철수 방안	-법적근거가 없음에 따라 추후 도로개설 공사를 진행함으로 발생되는 문제점 및 피해사항을 조사후 배상여부 결정 -공익사업으로 세제지원이나 은행이자 를 지연할 법적근거 없음 -사업주관청인 한국철도시설공단에 주민의 의견이 반영될수 있도록 협의
진정	-도로로 사용중인 토지매입 요청	김진영	-목천동 407-2번지 도로로 사용중인 토지보상건	-해당도로는 80년대 이전부터 도로로 형성되었으며, 비법정도로(마을길,농로등)로 토지보상 대상토지가 아님을 알림
진정	-도시계획선 변경 및 보상금 증액 요청	오지수	-송학동 322-169번지 도시계획선 변경 및 보상금 증액 요청	-전문 감정평가 기관에 의뢰하여 적정하게 평가한 가격임을 알려드리며, 본 사업이 조속한 마무리를 위해 보상협의를 부탁드립니다.
진정	-미불용지 보상요구	이찬언	-성당면 장선리 246-3번지 미불용지 보상요구	-재감정 평가후 보상협의를 추진할 계획임을 알림

8. 기 금 운 용 관 련

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

기금운영 사항이 없습니다.

9. 위 원 회 운 영 관 련

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□

위 원 회 명	설 치 근 거	구성원수	심의․의결․자문 기능여부	비 고
소하천관리위원회	소하천정비법 제26조 (익산시 소하천관리위원회 운영 규정)	9	심의

10. 용 역 사 업 현 황

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

(단위 : 천원)

일자	용 역 명	용역개요	용역비	용역업체	납품일자	용역기간	비고
계	19		1,086,857
2017.07.26	오산 장신~만석간도로확포장 외1 실시설계용역	실시설계 1식	21,273	㈜우향이앤씨	2018.02.26	2017.07.26 ~ 2018.02.26
2017.10.30.	금마 누동-신촌간 도로확포장 소규모환경영향평가 용역	소규모환경영향평가 1식	16,829	㈜퍼스트엔지니어링	2018.02.08	2017.10.30 ~ 2018.02.08
2017.09.28	낭산 석천삼거리 도로구조개선사업 실시설계 용역	실시설계 1식	9,702	주식회사 동운	2018.01.09	2017.09.28. ~ 2018.01.09
2017.02.14	국도 23호 오산교차로 진입램프설치공사 외 1개노선 실시설계용역	실시설계 1식	20,976	주식회사 동운	2017.04.25	2017.02.14 ~ 2017.04.25
2017.07.25	용안 창리~법성간 도로확포장공사 외 1개노선 실시설계용역	실시설계 1식	21,124	(유)장흥건설기술공사	2018.02.23	2017.07.25 ~ 2018.02.23
2017.10.20	용안 창리~법성간 소규모환경영향평가 용역	소규모환경영향평가 1식	18,300	주식회사 동운	2018.02.05	2017.10.20 ~ 2018.02.05

일자	용 역 명	용역개요	용역비	용역업체	납품일자	용역기간	비고
2017.02.03.	대판천 소하천정비공사 실시설계용역	실시설계 L=1.25㎞	52,200	제이씨엔㈜	2018.04.20.	2017.2.7.~ 2018.4.20
2017.03.21.	대판천 소하천정비사업 소규모환경 영향평가용역	환경영향평가 L=1.25㎞	25,292	㈜주한건설	2018.05.11.	2017.3.23.~ 2018.5.11
2017.06.30.	동면천 하천정비사업 실시설계용역	실시설계 L=3.05㎞	665,330	㈜경호 ㈜현성	-	2017.7.7.~ 2018.7.6. (일시중지:2018.3.2.)	만경강하천 기본계획 재수립 (익산국토관리청)에 따른 행정절차 이행기간 용역일시 중지
2017.07.07.	동면천 하천정비사업 조사측량용역	측량 L=3.05㎞	55,549	㈜현성	-	2017.7.7.~ 2018.7.10. (일시중지:2018.3.2.)
2017.07.07.	동면천 하천정비사업 토질조사용역	토질조사 L=3.05㎞	73,075	제이씨엔㈜	-	2017.7.7.~ 2018.7.10. (일시중지:2018.3.2.)
2017.10.31.	동면천 하천정비사업 소규모환경 영향평가용역	환경영향평가 L=3.05㎞	39,580	㈜퍼스트 엔지니어링	-	2017.11.2.~ 2019.1.16. (일시중지:2018.3.2.)
2017.02.20	지방하천 및 소하천 유지관리공사 실시설계용역	실시설계 1식	9,730	㈜동운	2017.04.21	2017.2.20. ~ 2017.4.23
2017.06.14	2017년 하천유지보수 실시설계용역	실시설계 1식	9,790	㈜동운	2017.08.07	2017.6.15. ~ 2017.9.28
2017.11.02	유천마을외 1개소 배수로 정비사업 실시설계용역	실시설계 1식	9,741	㈜우향이앤씨	2017.12.01	2017.11.3 ~ 2017.12.2

일자	용 역 명	용역개요	용역비	용역업체	납품일자	용역기간	비고
2017.11.13	웅포 해지천 하상정비사업 실시설계용역	실시설계 1식	9,876	㈜주한건설기술단	2018.01.18	2017.11.13 ~ 2018.1.22
2017.12.15	용강마을 배수로 정비사업 실시설계용역	실시설계 1식	9,578	㈜우향이앤씨	2018.02.26	2017.12.18 ~ 2018.2.26
2017.12.20	2018년 국가하천 유지보수(금강외2개소) 실시설계용역	실시설계 1식	9,402	㈜주한건설기술단	2017.04.10	2017.12.27 ~ 2018.4.10
2017.12.21	2018년 하천유지보수(목천포천외8개소)	실시설계 1식	9,510	㈜우향이앤씨	2017.04.10	2017.12.27 ~ 2018.4.10

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

11. 인․허가민원

인․허가 민원내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

12. 각종 공사 설계 변경상황

(단위 : 천원)

연번	사업명	예산액	계약액 (변경액)	계약자	계약 일자	변경 일자	공 사 기 간	변경사유
1	춘포 학연~익산천 제방간 도로확포장공사	429,396	246,331 (258,984)	(유)미래종합건설	2017.2.1	2017.7.24	2017.2.7 ~ 2017.11.17	하천기본계획에 맞게 포장 계획고 조정 등
2	오산 북영선 도로확포장공사 (2차분 1회)	435,630	227,352 (243,269)	(유)상명종합건설	2017.1.20	2017.1.24	2017.3.2. ~ 2017.8.14	유관기관 협의사항 반영 및 관급자재 단가 인상
3	군도 19호선 교행차로 설치공사	234,000	94,473 (96,961)	(주)성운건설	2017.5.29	2017.11.10	2017.6.8. ~ 2017.11.21	인접 농경지 진입로 포장 추가반영 등
4	용동 삼정-두무간 도로 확포장공사 (2차분)	1,629,210	357,650 (369,930)	(유)성은종합건설	2017.1.19	2017.11.23	2017.1.23 ~ 2018.4.13	시공기간 단축을 위한 도로횡단암거 BOX 시공방법 변경 등 (PC암거시공)
5	낭산 죽청천 준설공사	40,685	40,685 (39,864)	(유)부광건설	2017.5.16	2017.7.19	2017.5.18. ~ 2017.9.1	건강, 연금보험료등 제경비 정산 감액
6	금마 구룡마을 탑천보수공사	42,720	42,720 (42,074)	(유)세진석재산업	2017.5.23	2017.9.7.	2017.5.24. ~ 2017.9.6	건강, 연금보험료등 제경비 정산 감액
7	웅포 송천외 1개소 하천유지보수공사	42,483	42,483 (38,280)	(유)석동건설	2017.5.17	2017.8.30	2017.6.22. ~ 2017.9.5	지종천 제방유실 위험 적은구간 제외 및 제경비 정산 등
8	오산면 오산천 하천준설공사	87,776	87,776 (86,009)	㈜내담건설	2017.9.19	2017.12.12	2017.9.22. ~ 2018.1.14	건강, 연금보험료등 제경비 정산 감액
9	춘포면 창동천 하천준설공사	41,082	41,082 (40,425)	(유)석동건설	2017.11.10	2017.12.28	2017.11.15. ~ 2018.1.2	현지 실정에 맞게 사토장 운반거리 변경 등
10	성당면 두동천 하천준설공사	42,973	42,973 (40,962)	㈜가나안	2017.11.13	2017.12.21	2017.11.20. ~ 2018.1.18	현지 실정에 맞게 사토장 운반거리 변경 등

13. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률 (%)	비고
1	춘포 학연~익산천 제방간 도로확포장	L=0.74㎞ B=8m	458,091	457,116	975	99.8
2	용동 삼정~두무간 도로확포장	L=1.21㎞ B=8m	1,629,210	446,853	1,182,357	27.4
3	오산 북영선(금몽~남전)확포장	L=1.73㎞ B=8m	805,380	727,968	77,412	90.4
4	군도19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치	교행차로 8개소 L=0.61㎞	234,000	231,078	2,922	98.8
5	망성 신성-관산간 도로확포장	L=0.91㎞ B=7.0m	200,000	7,144	192,856	3.6
6	오산 외검선 도로확포장	L=0.8㎞ B=8.0m	100,000	31,305	68,695	31.3
7	오산 장신-만석간 도로확포장	L=1.6㎞ B=8.0m	200,000	0	200,000	0	1회 추경
8	용안 창리-법성간 도로확포장	L=0.84㎞ B=8.0m	200,000	0	200,000	0	1회 추경
9	금마 갈산-서편간 도로확포장	L=1.6㎞ B=8.0m	50,000	44,481	5,519	89	1회 추경
10	금마 누동-신촌간 도로확포장	L=0.93㎞ B=8.0m	100,000	7,228	92,772	7.2
11	낭산 석천삼거리 도로구조개선사업	회전교차로 1식	150,000	0	150,000	0	2회 추경
12	국도23호 오산교차로 램프 설치공사	L=0.28㎞ B=5.0m	333,000	89,850	243,150	27	본예산 1회추경
13	군도23호선 도로확포장	L=3.4㎞ B=16.5-20.5m	4,805,520	920,775	3,884,745	19.2	본예산 2회추경 3회추경
14	평화육교 재가설	L=233㎞ B=35m	5,103,000	3,650,655	1,452,345	72
15	소하천정비 (생활)	대판천 L=1.25㎞	2,540,156	590,033	1,950,123	23.3
16	지방하천정비 (왕궁천)	하천정비사업 L=9.2㎞	4,746,376	2,646,972	2,099,404	55.7
17	지방하천정비 (동면천)	하천정비사업 L=3.05㎞	800,000	369,716	430,284	46.2
18	하천제방유지보수(자체)	관내 소하천(102km) 및 지방하천(187km) 유지보수 1식	916,517	849,410	67,107	92.7
19	하천제방유지보수	관내 지방하천(187km) 유지보수 1식	1,176,000	42,706	1,133,294	3.6

20	국가하천유지관리 (4대강)	국가하천(금강, 강경천 24km) 유지관리 1식	491,000	73,913	417,087	15.1
21	국가하천유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강18km) 유지관리 1식	220,000	54,450	165,550	24.8
22	보안등신규설치	익산시관내 - 384개소	554,540	554,077	463	99
23	하나로전자랜드사거리주변 노후가로등 정비공사	철주교체: 34본	30,000	25,179	4,821	83
24	마동 솜리예술회관 부근 가로등 교체공사	등기구 및 철주 암대 교체: 39개	80,000	0	80,000	0	명시이월
25	도심지역노후가로등LED교체공사	LED교체:256개 (익산대로:125 무왕로:131)	200,000	190,349	9,651	95
26	가로등관리번호표찰설치공사	관리번호표찰 : 8,448매 설치	85,560	67,930	17,630	79
27	도심지역가로등유지보수단가	고장가로등보수	90,000	83,242	6,758	92

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

14. 민간에 대한 보조금 집행내역

민간에 대한 보조금 집행내역 없습니다.

15. 국･도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔 액	집행률 (%)	비 고
	계	5건	8,797,532	3,735,084	5.062,448	42.4
1	소하천정비 (생활)	대판천 L=1.25㎞	2,540,156	590,033	1,950,123	23.3
2	지방하천정비 (왕궁천)	하천정비사업 L=9.2㎞	4,746,376	2,646,972	2,099,404	55.7
3	지방하천정비 (동면천)	하천정비사업 L=3.05㎞	800,000	369,716	430,284	46.2
4	국가하천 유지관리 (4대강)	국가하천(금강, 강경천 24km) 유지관리 1식	491,000	73,913	417,087	15.1	국비
5	국가하천 유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강18km) 유지관리 1식	220,000	54,450	165,550	24.8	국비

16. 2017년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

(단위 : 천원)

연번	사업명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
	계		6,435,790	4,674,944	1,760,846	72.6
1	용동 삼정~두무간 도로확포장공사	L=1.21㎞ B=8m	658,210	378,178	280,032	57.4	명시
2	춘포 학연~익산천간 제방도로 확포장공사	L=0.74km B=8m	55,091	55,091	0	100	명시
3	오산 북영선 도로확포장공사	L=1.73㎞ B=8m	255,380	254,934	446	99.8	명시,사고
4	평화육교 재가설	L=233m B=35m	5,103,000	3,650,655	1,452,345	71.5	명시
6	군도23호 도로확포장공사	L=3.4km B=16.5-20.5m	6,520	6,520	0	100
7	소하천정비 (생활)	오동정천 L=0.74㎞	142,156	142,156	0	100 (준공 ‘17.6.26.)	명시 (78,908) 사고 (63,248)
8	국가하천 유지관리 (4대강)	국가하천(금강, 강경천 24km) 유지관리 1식	104,222	77,427	26,795	74.3	26,795 사고이월
9	국가하천 유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강18km) 유지관리 1식	74,312	74,312	0	100
10	하천제방유지보수	지방하천유지보수 1식	6,899	6,899	0	100
11	목천동외 2개면동 보안등 설치공사	보안등설치 - 16개소	30,000	28,772	1,228	95

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

17. 2017년 예산중 2018년 명시 및 사고이월 내역

연번	사 업 명	사업량	예산액	이월액	이월사유	비고
	계		20,122,689	13,451,178
1	용동 삼정~두무간 도로확포장공사	L=1.21㎞ B=8m	1,629,210	1,182,357 명시905,202 사고277,155	준공시기 미도래	명시 사고
2	평화육교재가설	교량재가설 L=233m	5,103,000	1,452,345	준공시기 미도래	사고
2	낭산 석천삼거리 도로구조개선	회전교차로 1개소	150,000	150,000	준공시기 미도래	명시
3	군도23호선 도로확포장	L=3.4㎞ B=20m	4,800,000	3,885,746	준공시기 미도래	명시
4	망성 신성-관산간 도로확포장공사	L=0.91kｍ B=7ｍ	200,000	192,856	준공시기 미도래	명시
5	오산 장신-만석간 도로확포장공사	L=1.61kｍ B=8ｍ	200,000	200,000	준공시기 미도래	명시
6	용안 창리-법성간 도로확포장공사	L=0.84kｍ B=8ｍ	200,000	200,000	준공시기 미도래	명시
7	금마 누동-신촌간 도로확포장공사	L=0.93kｍ B=8ｍ	98,845	92,772	준공시기 미도래	명시
8	오산 외용(외검선)도로확포장공사	L=0.8kｍ B=8ｍ	100,000	68,694	준공시기 미도래	명시
9	국도23호오산교차로 램프설치	L=0.29kｍ B=8ｍ	333,000	243,149	준공시기 미도래	명시
10	미불용지매입비 (시군도농어촌도로)		100,000	67,352	매입지연	명시
11	마동솜리예술회관 부근 가로등교체공사	등기구 및 철주 암대 교체: 39개	80,000	80,000	토목공사 동절기 공사중지로 이월하여 집행	명시
12	주민편익증진 (가로등.보안등설치)보조	보안등 신규설치 1식 30개소	37,000	37,000	현장조사및설계등 연내발주 및 준공이불가하여 이월	명시
13	소하천정비(생활)	오동정천 L=2.43㎞	2,393,700	1,949,662	준공시기 미도래 (준공 ‘17.6.26.)	명시
14	하천제방유지보수 (자체)	소하천 및 지방하천 유지보수 1식	902,000	67,106	실시설계 진행중 이월하여 집행	명시
15	하천제방유지보수	지방하천 유지보수 1식	1,176,000	1,133,294	실시설계 진행중 이월하여 집행	명시
16	국가하천유지관리 (4대강)	국가하천(금강,강경천) 유지관리 1식	573,221	443,882 명시417,087 사고 26,795	공사 추진중 이월하여 집행	명시 사고
17	국가하천유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강) 유지관리 1식	206,713	164,963	공사 추진중 이월하여 집행	명시
18	만경강문화관 진입도로개설공사		1,300,000	1,300,000	익산지방국토관리청 실시 설계중으로 2018년 상반기 토지매입 추진예정	명시
19	지방하천정비		40,000	40,000	한국국토정보공사 협의중,	명시
20	하천관리및유지관리 (해지천)		500,000	500,000	실시설계용역중	명시

(단위: 천원)

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

각종 예산전용 및 예비비집행 내역이 없습니다.

19. 공사 준공기한 연장내역

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

공사준공기한 연장 내역이 없습니다.

20. 국․도비예산중 사업 미시행으로 전액

반납한 예산 현황

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

국․도비 예산 중 사업 미시행으로 전액 반납한 현황이 없습니다.

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

21. 국․도비 반납현황

(단위: 천원)

사 업 명	예 산 액	집 행 액	반 납 액	반납사유
국가하천유지관리 (4대강 외)	71,588	18,781	52,807	2015년 국가하천 유지보수 집행 잔액

22. 2017년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

(단위 : 백만원)

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비(백만원)					사업 구분	공정	비고
					계	기투자	2016 이월	2017	금 후 투 자
					해	당	없	음

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

23. 2017년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

2017년 계획사업중 유보 및 취소된 사업이 없습니다.

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

24. 2017년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

2017년도 이월사업중 유보 및 취소된사업 없습니다

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□

25. 2017년도 예산편성 후 전액 미집행내역

(단위 : 백만원)

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비(백만원)					사업 구분	공정	비고
					계	기투자	2016 이월	2017	금 후 투 자
1	용안	용안 창리 법성간 도로확포장공사	L=0.84km B=8.m	2006- 2019	846	30	-	200	616	도로	설계 95%
2	오산	오산 장신-만석간 도로확포장공사	L=1.6km B=8.m	2017~ 2018	1,174	274	-	200	700	도로	설계 95%
3	낭산	낭산 석천삼거리 도로구조개선	회전교차로 1개소	2017~ 2018	350	-	-	150	200	도로	설계 95%

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	건설행정계장		김 진 태	□

26. 소 송 사 건  현 황

사건번호	사건명	원 고	피 고	접수일	변호사 선임사항	추진사항 (판,종결일)
전주지방법원 2015구함1493	토지수용 보상금증액	이성진외1	익산시	2015.07.22	우관수 변호사	2018.01.30.종결 (승소)
전주지방법원 2016구합2363	보상금	김인환	익산시	2016.07.09	우관수변호사	2017.08.17.종결 (각하결정)
전주지방법원 2016구합947	토지수용재결 처분취소등	연정태	익산시	2016.05.10	무	2018.02.14.종결 (승소)
전주지방법원 2016구합824	토지수용재결 처분취소등	연정태	익산시	2016.05.10	무	2018.02.14.종결 (승소)
익산시법원 2017가소102895	부당이득금반환 청구의 소	정경민	익산시	2017.10.17	무	2018.3.28.종결 (화해권고결정)
수원지방법원 2016가단801142 2018나69134(항소)	부당이득금	이문순외2	익산시	2016.12.01	우관수 변호사	항소심진행중
서울북부지방법원 2017가단123543 2018나31376(항소)	부당이득금	박일성외8	익산시	2017.07.04	우관수 변호사	항소심진행중
군산지원 2017가단54997	부당이득금	정소진, 이경봉	익산시	2017.09.14	무	진행중

27. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	건설과장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 민원접수 현황

부서명	시 정 에 바 란 다		비고
	접수(건)	처리(건)
건설과	59	59

□ 주요처리현황

◦ 도로개설 및 확포장 관련 민원	:  5건

◦ 가로등, 보안등관련 민원	: 45건

◦ 하천민원	:  9건

□ 주요처리내용

◦ 가로등불 교체 및 설치

⇒  노후된 가로등에 대하여는 밝은 램프로 교체하고 탈색으로 빛 확산을 저해하는 커버는    깨끗한 제품으로 교체정비 완료하였음을 알려드립니다.

◦ 탑천 주변 쓰레기 투기

⇒  하천내 불법 투기된 쓰레기 등에 대하여는 금후 처리토록 하겠으며, 불법투기 및 불법경작  금지 안내판 등을 설치하여 주민들에게 홍보토록하고 상시순찰 및 단속을 지속적으로 추진  하겠습니다.

감사자료 과 요구사항

1. 공익사업을 위한 용지보상

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	건 설 행 정 계 장		김 진 태	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 장 : 55개 사업장

(건설과 20, 도시재생과 29, 도로관리과 2, 시민안전과 3, 타기관 1 )

◦ 보상대상 : 3,091필지, 809,738㎡

◦ 보상금액 : 73,810백만원

□ 추 진 실 적

◦  토지매입실적 (68%) :  55개소 /  1,994필지 /  548,634㎡

◦ 보상계획 열람공고  :   5개소 /    567필지 /  127,309㎡

◦ 감정평가 실시  :  17개소 /    542필지 /  115,552㎡

◦ 토지수용재결신청   :  4개소 /    46필지  /   12,120㎡

◦ 토지수용재결 공탁 완료

▸ 송학동 소로3류 66호 도로확포장 공사

▸ 익산IC - 금마간 지방도 확포장공사 3차

□ 기 대 효 과

◦ 시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스 제공

◦ 공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여

2. 2017년도 시･군도 농촌도로 확포장 사업

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	건 설 행 정 계 장		이 용 재	□

□ 2017 이월사업 및․ 계속사업  -  24개사업

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2017년 예산액	금후 투자
	24개사업	L=30.77km B=5~20m	50,412	8,901	8,238	33,273
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	306	200	859	용지 68%	망성 303 (신선선)
2	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8.0m	2,526	1,721	805		준공	오산 204 (북영선)
3	오산 외용(외검선) 도로확.포장	L=0.8kｍ B=8ｍ	1,000	117	100	783	용지 83%	오산 210 (외용선)
4	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
5	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
6	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	1,174	274	200	700	용지 87% 설계 95%	오산 301 (용연선)
7	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	306	971	570	공정 70%	용동 204 (삼두선)
8	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
9	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190		785	용지 85%	함라 201 (진다선)
10	오산 모산선(신모선) 도로확.포장	L=1.7km B=6.5m	2,096	212		1,884	용지 85%	오산 306 (신모선)	일부 폐지
11	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180		1,692	용지 66%	군도 10호
12	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
13	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	30	200	616	설계 95%	용안 203 (자석선)
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229	50	2,550	용지 45%	금마 101 (서삼선)
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
16	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	405	100	906	용지 56%	금마 102 (누부선)
17	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2017년 예산액	금후 투자
18	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296		2,507	용지 57%	군도 21호
19	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127		2,093	용지 9%	춘포 103 (신화선)
20	낭산 석천삼거리 도로구조개선	회전교차로 설치 1식	350		150	200	설계 95%	군도 13호, 지방도 724호
21	국도 23호 오산교차로 램프설치	L=0.29kｍ B=8ｍ	333		333		현재 공정 95%	국도 23호
22	춘포 학연~익산천간 도로확.포장	L=0.77km B=8.0m	569	169	400		준공	춘포 201 (천서선)
23	군도23호 도로확포장공사	L=3.4km B=20.0m	12,500	1,420	4,800	6,280	용지 28%	군도 23호
24	군도 19호선 교행차로 설치	교행차로 8개소 L=0.61㎞	234		234		준공	군도 19호

□ 2017년도 신규 사업

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비 (백만원)				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2017 예산	금후
합 계
오산 외용(외검선) 도로확포장공사	L=0.8㎞ B=8m	2017-2018	517	117	100	300	용지 83%
낭산 석천삼거리 도로확포장공사	회전교차로 설치 1식	2017-2018	350	-	150	200	설계 90%
군도 19호선 교행차로 설치	교행차로 8개소 L=0.61㎞	2017	234	-	234	-	준공

□ 2017년 준공된 사업

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비 (백만원)				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2017 예산	금후
합 계
군도19호선 교행차로 설치	교행차로8개소 L=0.61㎞	2017. 6 ~2017.11	234	-	234	-	100%
춘포 학연~익산천제방간 도로확포장	L=0.74㎞ B=8m	2017. 2 ~2017.11	569	169	400	-	100%
오산 북영선 도로확포장	L=1.73㎞ B=8m	2016. 3 ~2017. 7	2,526	2,026	500	-	100%

3. 군도 23호선 도로 확·포장사업

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로~ 삼기 일반산업단지

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2019

◦ 사 업 량 : 도로확포장 L=3.4km, B=16.5 – 20.5m (2차로⇒4차로)

◦ 총사업비 : 125억원(공사비 90, 보상비 31, 기타 4)

□ 추 진 실 적

◦ 지방재정 투융자 심사	:  2013. 6.  4.

◦ 도시계획 시설결정 및 실시설계 용역	:  2013. 7 ~ 2015. 1

◦ 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시	:  2015. 6. 15.

◦ 실시계획인가 고시(익산시  고시 제 2016-4호)	:  2016. 1.  8.

◦ 편입토지 분할측량 및 보상계획 열람공고	:  2016. 3. 24.

◦ 감정평가 및 손실보상	:  2016. 6. ~ 2017. 12

※ 총 248필지 51,900㎡ 중 152필지 35,860㎡(69%)

□ 금 후 계 획

◦ 잔여토지 및 지장물 협의매수(수용재결)	: 2018. 1. ~ 12.

◦ 공사 추진	: 2018. 5. ~ 2019. 12.

4.

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	도로시설계장		이 용 재	□

평화육교 재가설 사업

□ 필   요   성

◦ 안전등급 D등급인 평화육교 재가설로 대중교통 안전성 확보 및 KTX 호남고속철도 완전한 정상화 실현

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2020

◦ 사 업 량 : 교량 재가설 L=233m(4차로⇒6차로)

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 시비 190)

◦ 사업시행 : 한국철도시설공단

□ 추 진 실 적

◦ 평화육교 재가설 사업 건의(기획재정부 등)	: 2011 ~ 2014.

◦ 국비 지원 확정(기재부 총사업비 승인)	: 2015.  4.  6.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진(한국철도시설공단)	: 2015. 11. ~ 2017. 4.

◦ 공사 발주	: 2017.  4.

◦ 공사 착공	: 2017.  7. 18.

◦ 목천지역 민원해소를 위한 대체우회도로 확장 및 변경 설계 완료

: 2017.  7. ~ 12.

◦ 보상계획 열람공고 및 손실보상	: 2017.  9. ~ 12.

▸ 토지 28필지 6,397㎡, 지장물 23건

□ 금 후 계 획

◦ 잔여토지 및 지장물 협의매수(수용재결)	: 2018.  1. ~ 12.

◦공사 추진	: 2018.  1. ~ 2020. 7.

▸호남선 KTX 노반공사와 병행시행

◦ 사업완료	: 2020.  7.

5. 왕궁천 하천 환경 정비사업

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	하 천 시 설 계 장		도 일	□

□ 사 업 개 요

사업명	위 치	사업기간	사 업 비(백만원)	사업 내용
왕궁천 하천환경 정비사업	왕궁면 동용리~ 춘포면 익산천 합류점	2015. ~ 2019.	24,720(국12,360 도4,944 시7,416) ※총사업비 변경(247→474) 협의중	하천정비 L=9.25km (제방축조 및 보축, 교량가설등) ▸실시설계 용역중 : 100%

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 착수	: 2015. 6.

◦ 실시설계 협의(익산지방국토관리청, 2회)	: 2016. 4. / 2017. 7.

◦ 주민설명회(2회)	: 2016. 6. / 2017. 10.

◦ 설계 경제성 검토(VE)	: 2016. 12.

◦ 편입토지 보상협의(보상율 70%)	: 2017. 8. ~ 현재

◦ 건설기술심의	: 2018. 3.

◦ 경관/공공디자인심의	: 2018. 4.

◦ 총사업비 조정(247 → 474억원, 증227) 요청중(국토부)	: 2018. 8.

□ 금 후 계 획

◦ 총사업비 조정 승인	: 2018. 9.

◦ 하천공사 시행계획 공고	: 2018. 10.

◦ 공사 발주	: 2018. 10.

6. 동면천 하천 환경 정비사업

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□

□ 사 업 개 요

사업명	위 치	사업기간	사 업 비(백만원)	사업 내용
동면천 하천환경 정비사업	왕궁면 동촌리~ 왕궁면 부상천 합류점	2017. ~ 2020.	15,480(국7,740 도3,096 시4,644)	하천정비 L=3.05km (제방축조 및 보축, 교량가설등) ▸실시설계 용역중 : 50%

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 착수	: 2017. 7.

◦ 주민설명회(1차)	: 2018. 4.

◦ 경관심의 용역 착수	: 2018. 4.

◦ 실시설계 협의(익산지방국토관리청, 1차)	: 2018. 7.

□ 금 후 계 획

◦ 설계 경제성 검토(VE)	: 2018. 9.

◦ 실시설계 협의(2차, 익산청)	: 2018. 10.

◦ 설계적정성 검토(조달청)	: 2018. 11.

◦ 건설기술심의(전북도)	: 2018. 12.

◦ 총사업비 협의	: 2019.  1.

◦ 원가심사(전북도)	: 2019.  2.

◦ 하천공사 시행계획 고시	: 2019.  3.

◦ 공사 발주	: 2019.  3.

7. 소 하 천 정 비 사 업(대판천)

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천시설계장		도 일	□

□ 사 업 개 요

사업명	위 치	사업기간	사 업 비(백만원)	사업 내용
대판천 소하천 정비사업	삼기면 연동리~ 낭산면 성남리	2017. ~ 2019.	3,076(국1,538 시1,538)	하천정비 L=1.253km (제방축조 및 보축, 교량가설 등) ▸구조물설치중: 35%(공정)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 착수	: 2017.  2.

◦ 사전설계검토(전북도)	: 2017. 10.

◦ 주민설명회	: 2017. 11.

◦ 총사업비 변경 승인(행안부)	: 2017. 12.

◦ 설계심의	: 2018.  2.

◦ 원가심사	: 2018.  3.

◦ 사업시행계획 공고	: 2018.  4.

◦ 공사 착수	: 2018.  5.

□ 금 후 계 획

◦ 교량공 등 구조물공	: 2018. 12.

◦ 부대공 및 공사 완료	: 2019.  9.

8. 만경강 문화관 조성사업

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

◦ 사업기간 : 2015. 10. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 11,300백만원(국비 10,000, 시비 1,300)

◦ 사업내용

▸규    모 : 11,555㎡(지하 1층, 지상2층, 연면적 1,686㎡)

▸주요시설 : 다목적실, 로비, 사무실 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청 하천계획과

□ 추 진 실 적

◦ 문화관 조성사업 관련 익산청 협의                 : 2017. 1. 10.

▸문화관 조성에 따른 MOU체결 협의

◦ 문화관 조성관련 4대강 문화관 등 선진지 견학      : 2017. 2. 7. ~ 2. 15.

◦ 문화관 조성에 따른 MOU 체결                    : 2017. 4. 7.

▸익산시, 김제시, 익산지방국토관리청

◦ 만경강 문화관 건립에 따른 TF팀 구성 및 운영(2회) : 2018. 02.~ 03.

▸익산국토청 4명, 익산시 2명, 김제시 2명

◦ 도시관리계획 결정(변경) 요청(익산시 도시재생과)  : 2018. 04. 16.

□ 금 후 계 획

◦도시관리계획 결정(변경)                      : 2018. 09.

◦ 감정 평가 및 용지보상 실시(익산시)	: 2018.  10. ~

◦ 공사 발주 및 추진(익산지방국토관리청)	: 2018. 10. ~2020. 12.

9. 국가하천 유지 관리사업

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 국가하천 (금강, 만경강, 강경천) : 34.2㎞

▸ 금강 21.26km, 만경강 10.4km, 강경천 2.54km

◦ 사업기간 : 2017. 01 ~ 12.

◦ 사 업 비 : 595백만원(국비 100%)

◦ 사업내용

▸ 국가하천(금강, 만경강, 강경천) 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 용안생태하천 백련지 데크 설치공사 추진

▸ 데크 신설 : L=143m, B=2m

◦ 금강 생태하천 소파 보수 등

▸ 용안 생태공원 연결 인도교 및 광장데크 보수

▸ 용안 생태공원 제방 사리부설

◦ 금강 생태하천 환경정비공사

▸ 인부사역 : 용안, 성당면 인근지역 주민

▸ 사역내용 : 생태하천 환경정비사업(풀깍기, 예초, 꽃길 조성지 관리 등)

▸ 사역기간 : 2017년 6월 ~ 11월 (3회)

▸ 인    원 : 20여 명(회당)

10. 지방하천 정비(하천제방 유지보수)

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 관내 지방하천 일원

◦ 사 업 비 : 1,030백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2017. 12.

◦ 규    모 : 관내 지방하천(187km) 유지보수 1식

◦ 주요내용 : 관내 지방하천(187km) 준설, 제방보수, 제초, 하천환경정비 등

□ 추 진 실 적

◦ 왕궁면 동면천 하천준설공사(준설 L=1,421m) 추진

◦ 금마면 탑천 제방 보수공사(석축쌓기 L=32m) 추진

◦ 오산면 오산천 하천준설공사(준설 L=1,496m) 추진

◦ 용동면 대조천 하천준설공사(준설 L=2,900m) 추진

◦ 금마면 망동천 제방 보수공사(준설 L=300m, 톤마대 쌓기 211개) 추진

◦ 왕궁면 부상천 하천준설공사(준설 L=990m) 추진

◦ 석암동 목천포천 석축보수공사(석축쌓기 L=123m) 추진

◦ 함열읍 함열천 교량보수공사(옹벽블럭 쌓기 28㎡, 사석부설 23㎡) 추진

◦ 금마면 기양천 교량보수공사(석축쌓기 L=11m, 교량난간 설치 L=72m) 추진

11. 도로조명시설 조도개선

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사 업 량 : 10개사업

◦ 사 업 비 : 1,170백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.

◦ 도로조명 시설 조도개선 공사 내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		10개 사업	1,170,680
보 안 등 신규설치	생활환경개선 보안등신규설치	보안등설치 370개소	554,540
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비 90개소	90,000
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 50개소	50,000
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	60,080
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	30,000
	전기안전점검부적합보수	부적합 가로등 보수	23,000
	도심지역노후가로등 LED교체공사	가로등LED교체	225,000
	가로등 관리번호 표찰 설치공사	관리번호표찰 8,448개소	85,560
	하나로전자랜드주변노후가로등보수	노후가로등철주정비 34본	30,000

□ 추 진 실 적(1,161,803 / 99%)

◦ 보안등 신규설치(384개소)	554,077천원

◦ 도심지역 가로등 유지보수	83,242천원

◦ 산업단지 가로등 유지보수	46,672천원

◦ 가로등노후가로등점멸기교체(5개소)	22,500천원

◦ 읍면지역 보안등 보수	55,502천원

◦ 노후보안등기구 교체 및 부적합 보수	49,482천원

◦ 도심지역노후가로등LED교체공사외 2건	282,398천원

◦ 가로등관리번호 표찰 설치공사	67,930천원

12. 도로조명 고장민원 처리 내역

확인자	:	건 설 과 장		이 옥 섭	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 필   요   성

◦ 도로조명 고장민원 접수에서 처리까지의 기간을 단축하여 여성 및

노약자의 야간통행 편익제공으로 보행자 통행불편을 최소화 하고자 함.

□ 사 업 개 요

◦ 2017년도 생활민원 처리 현황

(2017년 12월말 현재)

구 분	설치수량	처리건수	평균처리일수	비고
합 계	28,041등	5,200
가로등	9,317등	907	3일
보안등	18,724등	4,293	5일

□ 쟁점 및 애로사항

◦ 고장민원이 읍․면․동에 산재해 있고 민원처리반이 가로등, 보안등

각 1개조로 이동에 따른 시간소요로 고장민원 처리가 지연되어 재차

민원 발생함.

□ 추 진 실 적

◦ 도로조명 생활민원처리 지역별 이원화 시행	: 2017. 1.~ 12.

▸ 함열읍외 10개면	: 단가계약에 따른 민원처리

▸ 18개 면･동	: 가로등관리 자체인원으로 처리

◦ 도로조명 생활민원 처리(년중)	: 2017. 1 ~ 12