2018. 10.

제212회 익산시의회(제1차 정례회)

2018행정사무감사자료

상수도과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2017년도 업무성과 및 반성 …………………………	7
				2.	2017년도 예산집행 및 추진사항 ………………	8
				3.	2017년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 …	10
				4.	2017년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과 …	12
				5.	시정질문에 대한 조치 결과 ……………………	12
				6.	주요사업 조서(3천만원이상) ………………	13
				7.	2017년 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역 …	16
				8.	기금 운용 관련 …………………………………	16
				9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 …………	17
				10.	용역사업 관련 …………………………………	18
				11.	인․허가 민원관련 ………………………………	19
				12.	각종 공사 설계변경 상황 ………………………	20
				13.	건설공사 집행 현황(3천만원이상) …………	22
				14.	민간에 대한 보조금 집행 내역 …………	25
				15	국․도비 보조사업 집행 현황(1억원이상) …	25
				16.	2017년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역…	26
				17.	2017년 예산 중 2018년 명시 및 사고이월 내역…	27
				18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 …………	28
				19.	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	28
				20	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산 현황	29
				21.	국․도비 반납 현황(항목별 반납사유 명시) …	29
				22.	2017년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	30
				23.	2017년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황…	30
				24.	2017년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 …	31
				25.	2017년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ……	31
				26.	소송 사건 현황 …………………………………	32
				27.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ………	33

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	상수도 공기업 운영 사항 …………………………	37
				2.	상수도 요금 부과징수 및 체납액 현황 ………… ▸20위까지 과세물건 표시	38
				3.	상수도 요금 부과 및 징수 현황 …………………	40
				4.	상수관망 최적화사업 ………………………………	41
				5.	급수구역확장 및 급․배수관 민원공사 ………	42
				6.	안전하고 깨끗한 수돗물 생산 공급 ……………	43
				7.	상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화 …………	44
				8.	수도정비 기본계획 및 배수지확장 기본실시설계 용역 …	45
				9.	정수시설 운영관리 …………………………	46
				10.	상수도 사용료 체납 및 단수 현황 …………	47
				11.	배수지 관리 현황(배수지 현황 등) …………	57

감사자료 과 공통사항

1. 2017년도 업무성과 및 반성

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□

□ 성      과

◦ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

▸ 블록구축 및 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 14개소 8.0㎞/752개소

▸ 관내 변류정비 및 교체 123개소

◦ 효율적 검침 및 부과·징수로 경영 효율화 제공

▸ 정확한 검침으로 부과체계 확립 : 검침원 교육 12회, 현장검침 61,894전

▸ 상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 95.2%

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

▸ 급수구역 확장공사 추진 : 함라면 진등마을 외 3개소 4.8㎞

▸ 급·배수관 민원공사 추진 : 영등동 인북로46길 외 410개소

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

▸ 급수장치 수선공사 : 1,570건

▸ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 587건/1,057건

▸ 상수관 부설도로 노면정비 : 63개소/16.0㎞

□ 반      성

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

▸ 년도별 현실화율 현황(2016년 80.94%, 2017년 76.29%)

2. 2017년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□
작성자	:	수질실험계장		문 대 은	□

□ 세      입

(2017. 12. 31. 현재)                                              (단위 : 백만원)

과 목			예 산 액	세 입 액	비 율	비 고
합 계			37,669	36,363	96.5
1. 상 수 도 사 업 수 입			29,681	28,282	95.3
	영 업 수 익	소 계	29,519	28,088	95.2
		급 수 수 익	27,935	26,545	95.0
		급수공사수익	1,085	1,056	97.3
		기타영업수익	499	487	97.6
	영업외 수 익	소 계	162	194	119.8
		이 자 수 익	80	95	118.8
		타회계전입금수익	42	27	64.3
		기타 영업외수익	40	72	180.0
2. 자 본 적 수 입			7,988	8,081	101.2
	자본적 수 입	소 계	516	375	72.7
		시 설 분 담 금	199	179	89.9
		타 회계 건설보조금	128	63	49.2
		공 사 부 담 금	189	133	70.4
	기 타 자 본 적 수 입		7,472	7,706	103.1

□ 세      출

(2017. 12. 31. 현재)                                             (단위 : 백만원)

과 목		예 산 액	집 행 액	비 율	비 고
총 계		37,669	29,016	77.0
영업비용	소계	21,981	21,687	98.7
	원수 및 취수비	12,173	12,062	99.1
	정수비	2,524	2,444	96.8
	배․급수비	125	108	86.4
	일 반 관 리 비	4,356	4,313	99.0
	징수및수용가관리비	1,702	1,669	98.1
	급 배수 공 사 비	1,101	1,091	99.1
영업외비용	지급이자	0	0	0.0
예 비 비	예비비	2,455	0	0.0
유형자산 취 득	소계	11,635	7,328	63.0
	구축물	11,331	7,061	62.3
	기계장치	215	180	83.7
	공기구비품	89	87	97.8
기타자본적지출	정부보조금반환	1	1	100
예 비 비	예비비	1,597	0	0.0

3. 2017년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치결과

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□
작성자	:	수질실험계장		문 대 은	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	안전하고 깨끗한 물 공급 및 유수율 상승을 위해서 노후관 교체가 필수임. 예산을 적극 반영하여 상수관망 최적화 용역을 통한 노후관 정비 추진바람.	상수관로 1,572km중 20년이상 노후관로는 636km로 사업비가 2,500억 정도이며, 일시 교체에는 어려움이 있어 1단계로 (2017.1~2021.12)5년간 소요되는 사업비 400억에 대하여 연차적으로 예산확보하여 추진하고 있음.
2	유수율 제고를 위해 대형음식점 및 사우나 등에 대하여 사용량 추이 및 현지실태를 파악하여 도수를 철저히 단속바라며, 순세계잉여금이 많은바 노후관 교체에 투입바람.	매월 검침원의 철저한 확인 및 직원 수시 출장으로 현장확인 행정을 통한 도수 예방 활동을 강화하고 각종 동향관리로 단속업무에 최선을 다하고 있음.
3	장기출타, 입원 등의 사유로 검침이 어려울시 검침부를 부착하여 자가검침을 유도하고 이에 따른 주민홍보를 강화해 주기 바라며, 자동검침도 확대바람.	매월 검침원 교육을 통하여자가 검침부 활용을 적극 홍보 하고 옥외검침기(300개소)를 설치하여 주민불편을 최소화 하였음.

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
4	원수에 문제가 생기지 않도록 유관기관과 협조하여 대간선수로에 대해 철저한 관리 바람.	상수원 수로 수질점검 및 모니터링을 지속적으로 실시하고 있으며, 농어촌공사와 협조하여 수로주변 청결유지에 최선을 다하고 있음.
5	체납독려 등 민원처리시 친절한 자세로 행정에 대한 만족도 제고에 노력 당부.	내방 민원 및 상수도행정 업무추진과 관련 수시 직원 교육 및 매월 검침원 교육 실시로 친절행정 추진에 최선을 다하고 있음.
6	수의계약시 다수의 업체가 혜택을 볼 수 있도록 하기 바라며, 상수도 관련 사업추진시 지역업체가 일을 할 수 있도록 제도개선 검토바람.	사업추진시 지역업체 선정을 우선으로 하고 있으며, 수의계약은 11개 대행업체 등 다수의 지역업체가 참여하고 있음.
7	급격한 수압변경으로 인해 시민들이 불편받지 않도록 하기 바람	가압장 설치로 지속적인 민원이 해결되었음. 다만 시가지 저지대라도 내부배관문제 등 일시적으로 물 사용이 많은 시간대는 약간 수압이 낮을 수는 있음.
8	농촌 외딴가구에 대한 상수도 공급 관로매설비지원 규정마련 검토바라며, 간이상수도 수질검사 철저히 하기바람	현재 상수도 요금 현실화율이 76.29%정도로 아직은 지원이 어려움. 상수도요금 현실화가 어느 정도 됐을 시 점차적으로 검토토록 노력하겠음. 간이상수도 수질검사는 연4회 실시함.

4. 2017년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□
작성자	:	수질실험계장		문 대 은	□

해  당   없  음

5. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□
작성자	:	수질실험계장		문 대 은	□

해  당   없  음

6. 주요사업 조서(3천만원이상)

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
계	40건		7,129
정수장 시설물 보수공사 (신흥여과지 옥상방수)	옥상방수843㎡ 시설물도색30㎡	2017. 2. 10. ~ 2017. 5. 22	33	(유)삼화건설 도장	100
여산면 호산리 유점마을 배수관부설공사	L=1,699m (D50~75)	2017. 3. 8.~ 2017. 4. 27.	90	거원건설(주)	100
함라면 신대리 진등마을 배수관부설공사	L=1,074m (D50)	2017. 3. 10. ~ 2017. 4. 12.	42	(유)도암건설	100
함열읍 학선마을 배수관부설공사	L=1,908m (D25~100)	2017. 7. 3. ~ 2017. 9. 6.	165	(유)다산종합건설	100
용동면화실마을외3개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=984m	2017. 3. 29. ~ 2017. 5. 24.	35	(유)장원건설	100
웅포면셋터마을외6개소 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,256m	2017. 3. 29. ~ 2017. 5. 10.	50	㈜대건포장중기	100
황등면신성마을외3개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,345m	2017. 3. 31. ~ 2017. 5. 15.	50	(유)한국티엠에스	100
함열읍장등마을외5개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,244m	2017. 5. 8. ~ 2017. 5. 29.	49	㈜양승건설	100
황등면성내마을외4개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,323m	2017. 5. 29. ~ 2017. 7. 3.	49	(유)엠제이이엔씨	100
오산면광양마을외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,079m	2017. 5. 29. ~ 2017. 7. 3.	41	(유)대주건설	100
오산면용곤마을외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,097m	2017. 5. 29. ~ 2017. 6. 19.	38	㈜디엠건설	100
황등면신기촌마을외4개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=837m	2017. 11. 7. ~ 2017. 12. 11.	33	㈜영웅건설	100
사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
함라면오산마을외2개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=981m	2017. 11. 6. ~ 2017. 12. 6.	38	청건설(주)	100
황등면정착2마을외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,006m	2017. 12. 7. ~ 2018. 1. 12.	40	㈜신양건설	100
망성면하포외3개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,272m	2017. 2. 22. ~ 2017. 3. 24.	44	(유)덕산건설	100
여산면교창외2개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=957m	2017. 2. 23. ~ 2017. 3. 30.	47	㈜엠제이이엔씨	100
삼성동오동외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=899m	2017. 6. 5. ~ 2017. 7. 7.	38	㈜엠제이이엔씨	100
망성면선리외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=806m	2017. 10. 25. ~ 2017. 11. 30.	38	(유)덕산건설	100
금마면구룡마을배수관부설공사 및 가압장설치공사	배수관부설L=260m 가압장설치1개소	2017. 9. 25. ~ 2017. 11. 13.	37	(유)신안건설	100
국가식품클러스터 배수지 건설사업	배수지 V= 8,800㎥	2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31	2,607	㈜자일건설	100
여산면석교외3개마을상수도 부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1069m	2017. 1. 1. ~ 2017. 3. 31.	37	㈜엠제이이앤씨	100
춘포면 쌍정마을 외 1개소 배수관부설공사	배수관부설 L=1,502m	2016. 11. 9. ~ 2017. 1. 7.	93	(유)이레건설	100
영등동 출수불량지역 가압장설치공사	가압장설치 1개소	2016. 11. 9. ~ 2017. 1. 6.	32	남성환경	100
익산시 신흥수계 SH-01블록구축공사	관경확대 D250㎜, L=326m 유량계실 1개소	2017. 5. 2. ~ 2017. 12. 30.	158	(유)효동건설	100
익산시 신흥수계 SH-02블록구축공사	신설관로 D100㎜, L=1,361m 유량계실 1개소	2017. 5. 15. ~ 2017. 9. 29.	271	㈜한백건설	100
익산시 신흥수계 SH-03블록구축공사	신설관로,관경확대 D150㎜, L=492m 유량계실 1개소	2017. 3. 20. ~ 2017. 7. 17.	126	(유)신원건설	100
익산시 신흥수계 SH-04블록구축공사	신설관로,관경확대 D100㎜, L=333m 유량계실 1개소	2017. 3. 21. ~ 2017. 7. 18.	129	(주)한백건설	100
익산시 신흥수계 SH-05블록구축공사	신설관로 D250㎜, L=770m 유량계실 1개소	2017. 5. 22. ~ 2017. 9. 18.	258	(유)대광건설	100
익산시 신흥수계 SH-06블록구축공사	신설관로 D200㎜, L=324m 유량계실 1개소	2017. 5. 2. ~ 2017. 9. 23.	135	㈜호남산업개발	100
익산시 신흥수계 SH-07,10 블록구축공사	신설관로 D300㎜, L=646m 유량계실 1개소	2017. 4. 12. ~ 2017. 9. 29.	289	(유)정우건설	100
익산시 신흥수계 SH-08블록구축공사	신설관로 D100㎜, L=775m 유량계실 1개소	2017. 5. 11. ~ 2017. 9. 29.	224	(유)정진	100

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
익산시 신흥수계 SH-09블록구축공사	신설관로 D150㎜, L=786m 유량계실 1개소	2017. 5. 16. ~ 2017. 9. 12.	139	(유)푸른건설	100
익산시 신흥수계 SH-11블록구축공사	신설관로 D300㎜, L=266m 유량계실 1개소	2017. 5. 8. ~ 2017. 12. 26.	210	태광건설(주)	100
익산국가식품클러스터 진입도로상수도관이설공사	D300㎜, L=1,689m	2017. 6. 5. ~ 2017. 12. 31.	282	㈜흥건사	100
함열읍 동지산 일원 노후관 교체공사	D300㎜, L=274m	2017. 4. 17. ~ 2017. 10. 4.	97	㈜지음건설	100
익산시 정수시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역	정밀점검 1식 내진성능평가 1식	2017. 5. 25. ~ 2018. 1. 19.	111	㈜한국시설 안전연구원	100
2017년 급수공사 GIS DB구축용역	상수도측량조사 및 DB구축 L=4.1km	2017. 2. 10. ~ 2018. 2. 9.	41	(유)산야	100
익산시 수도정비기본계획(변경) 및 배수지확충 기본,실시설계	수도정비기본계획변경 및 배수지확충기본,실시설계	2017. 5. 10. ~ 2018. 11. 1.	700	㈜도화엔지니어링	85
2017년 상수도관망 최적화사업GIS DB구축용역	GIS DB구축 L=7.0㎞	2017. 3. 6. ~ 2018. 3. 5.	53	(유)산야	100
2017년 익산시 상수도 누수탐사용역	누수탐사 L=56.4㎞	2017. 4. 17. ~ 2018. 4. 16.	180	(유)여울건설엔지니어링	100

7. 2017년 각종 민원(진정, 건의, 청원 등)

접수 처리내역

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□
작성자	:	수질실험계장		문 대 은	□

해  당   없  음

8. 기금 운용 관련

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□

해  당   없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	수질실험계장		문 대 은	□

○ 위원회 설치 현황

위 원 회 명	설 치 근 거	위원장	위원수	기능
수돗물평가위원회	․ 수도법 제30조 ․ 상수도급수조례 제48조	부시장	10명	자문

○ 위원 명단

직 위	성 명	소 속 및 직 위	직 위	성 명	소 속 및 직 위
위 원 장	김철모	부 시 장	위 원	국영순	익산시 새마을 부녀회 회장
위 원	김용주	상하수도사업단장	〃	김강주	원광대학교 구강미생물과 교수
〃	강경숙	시의회 의원	〃	조 민	전북대학교 환경생명공학과
〃	문효숙	익산YWCA회장	〃	서순애	대한미용사회 익산지부회장
〃	이영미	한국여성소비자연합익산지부장	〃	김태정	한국음식업중앙회 익산시 지부장

○ 위원회 운영현황

▸개 최 일 : 2017. 9. 6.(수), 2017. 11. 14.(화)

▸참 석 자 : 총 16명 (1차 : 7명, 2차 : 9명)

▸회의내용 : 생활용수 급수체계 개선방안 설명 및 토의, 의견 수렴 등

10. 용역사업 관련

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	용역업체	총사업비	계약방법	비 고
계	8건		1,160
익산시 정수시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역	정밀점검 1식 내진성능평가 1식	㈜한국시설 안전연구원	111	일반경쟁	정수생산
익산시 정수시설부지 지반조사 용역	지반조사 4공	㈜주한건설기술단	17	공개견적
상수도 정·배수지 청소용역(상반기)	16지(24,625㎡)	라이프환경개발	29	공개견적
상수도 정·배수지 청소용역 (하반기)	16지(24,625㎡)	미화산업사	29	공개견적
익산시 수도정비기본계획(변경) 및 배수지확충 기본,실시설계	수도정비기본계획변경 및 배수지확충기본,실시설계	㈜도화엔지니어링	700	일반경쟁	급수시설
2017년 급수공사 GIS DB구축용역	상수도측량조사 및 DB구축 L=4.1km	(유)산야	41	공개견적
2017년 상수도관망 최적화사업GIS DB구축용역	GIS DB구축 L=7.0㎞	(유)산야	53	공개견적	누수방지
2017년 익산시 상수도 누수탐사용역	누수탐사 L=56.4㎞	(유)여울건설엔지니어링	180	공개견적

11. 인․허가 민원관련

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□
작성자	:	수질실험계장		문 대 은	□

해  당   없  음

12. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□

(단위 : 백만원)

일자	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증감
계	14건	8,947	7,720	7,809	89
7.13.	익산시 신흥수계SH-03블록구축공사	76	67	85	18	(유)신원건설	2017. 3. 20. ~ 2017. 7. 17.	현장여건반영
7.13.	익산시 신흥수계SH-04블록구축공사	81	72	64	△8	㈜한백건설	2017. 3. 21. ~ 2017. 7. 18.	현장여건반영
8.22.	함열읍흘산리학선마을 배수관부설공사	107	94	102	8	(유)다산종합건설	2017. 7. 3. ~ 2017. 9. 6.	관로공 물량변경
9.08.	익산시 신흥수계SH-09블록구축공사	123	108	77	△31	(유)푸른건설	2017. 5. 16. ~ 2017. 9. 12.	포장공물량변경
9.15.	익산시 신흥수계SH-05블록구축공사	160	142	152	10	(유)대광건설	2017. 5. 22. ~ 2017. 9. 18.	현장여건반영
9.20.	익산시 신흥수계SH-06블록구축공사	74	65	55	△10	㈜호남산업개발	2017. 5. 2. ~ 2017. 9. 23.	현장여건반영
9.22.	익산시 신흥수계SH-02블록구축공사	176	157	160	3	㈜한백건설	2017. 5. 15. ~ 2017. 9. 29.	매설구간변경 (인도→차도)
9.26.	익산시 신흥수계SH-08블록구축공사	144	128	121	△7	(유)정진	2017. 5. 11. ~ 2017. 9. 29.	현장여건반영
9.26.	익산시 신흥수계SH-07,10블록 구축공사	159	138	156	18	(유)정우건설	2017. 4. 12. ~ 2017. 9. 29.	포장공물량변경

일자	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증감
9.29.	함열읍 동지산 일원 노후관교체공사	54	47	44	△3	㈜지음건설	2017. 4. 17. ~ 2017. 10. 4.	현장여건반영
12.13.	익산국가식품클러스터상수도관이설공사	115	102	117	15	㈜흥건사	2017. 6. 5. ~ 2017. 12. 31.	현장여건반영
12.20.	익산시 신흥수계SH-11블록구축공사	67	59	73	14	태광건설(주)	2017. 5. 8. ~ 2017. 12. 26.	현장여건반영
12.26.	국가식품클러스터 배수지건설공사	7,517	6,460	6,515	55	(유)자일건설	2016. 4. 1. ~ 2017. 12. 27.	제경비정산 및 현장여건 반영 세부사항조정
12.26.	익산시 신흥수계SH-01블록구축공사	94	81	88	7	(유)효동건설	2017. 5. 2. ~ 2017. 12. 30.	매설구간변경 (인도→차도)

13. 건설공사 집행 현황(3천만원이상)

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양 기 주	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
계	35건		6,044
정수장 시설물 보수공사 (신흥여과지 옥상방수)	옥상방수843㎡ 시설물도색30㎡	2017. 2. 10. ~ 2017. 5. 22	33	(유)삼화건설도장	100
여산면 호산리 유점마을 배수관부설공사	L=1,699m (D50~75)	2017. 3. 8.~ 2017. 4. 27.	90	거원건설(주)	100
함라면 신대리 진등마을 배수관부설공사	L=1,074m (D50)	2017. 3. 10. ~ 2017. 4. 12.	42	(유)도암건설	100
함열읍 학선마을 배수관부설공사	L=1,908m (D25~100)	2017. 7. 3. ~ 2017. 9. 6.	165	(유)다산종합건설	100
용동면화실마을외3개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=984m	2017. 3. 29. ~ 2017. 5. 24.	35	(유)장원건설	100
웅포면셋터마을외6개소 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,256m	2017. 3. 29. ~ 2017. 5. 10.	50	㈜대건포장중기	100
황등면신성마을외3개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,345m	2017. 3. 31. ~ 2017. 5. 15.	50	(유)한국티엠에스	100
함열읍장등마을외5개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,244m	2017. 5. 8. ~ 2017. 5. 29.	49	㈜양승건설	100
황등면성내마을외4개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,323m	2017. 5. 29. ~ 2017. 7. 3.	49	(유)엠제이이엔씨	100
오산면광양마을외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,079m	2017. 5. 29. ~ 2017. 7. 3.	41	(유)대주건설	100
오산면용곤마을외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,097m	2017. 5. 29. ~ 2017. 6. 19.	38	㈜디엠건설	100
황등면신기촌마을외4개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=837m	2017. 11. 7. ~ 2017. 12. 11.	33	㈜영웅건설	100
사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사		공정(%)
함라면오산마을외2개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=981m	2017. 11. 6. ~ 2017. 12. 6.	38	청건설(주)		100
황등면정착2마을외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,006m	2017. 12. 7. ~ 2018. 1. 12.	40	㈜신양건설		100
망성면하포외3개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1,272m	2017. 2. 22. ~ 2017. 3. 24.	44	(유)덕산건설		100
여산면교창외2개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=957m	2017. 2. 23. ~ 2017. 3. 30.	47	㈜엠제이이엔씨		100
삼성동오동외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=899m	2017. 6. 5. ~ 2017. 7. 7.	38	㈜엠제이이엔씨		100
망성면선리외1개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=806m	2017. 10. 25. ~ 2017. 11. 30.	38	(유)덕산건설		100
금마면구룡마을배수관부설공사 및 가압장설치공사	배수관부설L=260m 가압장설치1개소	2017. 9. 25. ~ 2017. 11. 13.	37	(유)신안건설		100
국가식품클러스터 배수지 건설사업	배수지 V= 8,800㎥	2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.	2,607	㈜자일건설		100
여산면석교외3개마을 상수도부설도로노면정비공사	아스콘덧씌우기 L=1069m	2017. 1. 1. ~ 2017. 3. 31.	37	㈜엠제이이앤씨		100
춘포면 쌍정마을 외 1개소 배수관부설공사	배수관부설 L=1,502m	2016. 11. 9. ~ 2017. 1. 7.	93	(유)이레건설		100
영등동 출수불량지역 가압장설치공사	가압장설치 1개소	2016. 11. 9. ~ 2017. 1. 6.	32	남성환경		100
익산시 신흥수계 SH-01블록구축공사	관경확대 D250㎜, L=326m 유량계실 1개소	2017. 5. 2. ~ 2017. 12. 30.	158	(유)효동건설		100
익산시 신흥수계 SH-02블록구축공사	신설관로 D100㎜, L=1,361m 유량계실 1개소	2017. 5. 15. ~ 2017. 9. 29.	271	㈜한백건설		100
익산시 신흥수계 SH-03블록구축공사	신설관로,관경확대 D150㎜, L=492m 유량계실 1개소	2017. 3. 20. ~ 2017. 7. 17.	126	(유)신원건설		100
익산시 신흥수계 SH-04블록구축공사	신설관로,관경확대 D100㎜, L=333m 유량계실 1개소	2017. 3. 21. ~ 2017. 7. 18.	129	(주)한백건설		100
익산시 신흥수계 SH-05블록구축공사	신설관로 D250㎜, L=770m 유량계실 1개소	2017. 5. 22. ~ 2017. 9. 18.	258	(유)대광건설		100
익산시 신흥수계 SH-06블록구축공사	신설관로 D200㎜, L=324m 유량계실 1개소	2017. 5. 2. ~ 2017. 9. 23.	135	㈜호남산업개발		100
사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사		공정(%)
익산시 신흥수계 SH-07,10 블록구축공사	신설관로 D300㎜, L=646m 유량계실 1개소	2017. 4. 12. ~ 2017. 9. 29.	289	(유)정우건설		100
익산시 신흥수계 SH-08블록구축공사	신설관로 D100㎜, L=775m 유량계실 1개소	2017. 5. 11. ~ 2017. 9. 29.	224	(유)정진		100
익산시 신흥수계 SH-09블록구축공사	신설관로 D150㎜, L=786m 유량계실 1개소	2017. 5. 16. ~ 2017. 9. 12.	139	(유)푸른건설		100
익산시 신흥수계 SH-11블록구축공사	신설관로 D300㎜, L=266m 유량계실 1개소	2017. 5. 8. ~ 2017. 12. 26.	210	태광건설(주)		100
익산국가식품클러스터 진입도로상수도관이설공사	D300㎜, L=1,689m	2017. 6. 5. ~ 2017. 12. 31.	282	㈜흥건사		100
함열읍 동지산 일원 노후관 교체공사	L=274m	2017. 4. 17. ~ 2017. 10. 4.	97	㈜지음건설		100

14. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

15. 국·도비 보조사업 집행 현황(1억원이상)

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

16. 2017년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업기간	총사업비	이월액	현공정(%)	비고
계	9건		9,296	4,287
신흥 및 금강정수장 여과사 교체공사	여과사교체49.8㎥	2016. 11. ~ 2017. 1.	32	32	100
금강정수장 여과지동 보수공사(철제면도색)	철제면도색78㎡	2016. 12. ~ 2017. 1.	4	4	100
국가식품클러스터 배수지 건설사업	배수지 건설 V=8,800㎥ 송배수관 L=1,625m	2016. 4. ~ 2017. 12.	7,517	3,314	100
상수도부설도로 노면정비공사	상수도부설도로 노면정비 1식	2016. 1. ~ 2017. 3.	779	52	100
춘포면 쌍정마을 외 1개소 배수관부설공사	배수관부설 L=1,502m	2016. 11. ~ 2017. 1.	127	93	100
영등동 출수불량지역 가압장설치공사	가압장신설 1개소	2016. 11. ~ 2017. 1.	40	33	100
익산시 수도정비기본계획(변경) 및 배수지확충 기본,실시설계	용역 1식	2017. 5. ~ 2018. 11.	700	700	85
2016년 노후관 교체공사 GIS DB 구축용역	관로탐사 L=7.0km	2016. 4. ~ 2017. 4.	54	16	100
만경강 대장잠수교 상수도관 이설공사	상수관로(D75) L=238m	2016. 12. ~ 2017. 1.	43	43	100

17. 2017년 예산 중 2018년 명시 및 사고이월 내역

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업기간	총사업비	이월액	현공정(%)	비고
계	10건		10,156	5,359
삼기면석불사거리~낭산사거리간 배수관부설공사	배수관부설 L=6,380m	2018. 1. ~ 2018. 7.	3,500	3,500	100
영등동송내마을 배수관부설공사	배수관부설 1식	2018. 1. ~ 2018. 12.	31	31	0	소라산공원개발사업으로 불용예정
유수율제고사업	상수관망 최적화사업	2017. 1. ~ 2018. 12.	3,080	370	90
익산시정수시설물 정밀점검 및 내진성능평가용역	정밀점검 1식 내진성능평가 1식	2017. 5. ~ 2018. 1.	111	33	100
익산시수도정비계획(변경)및배수지확장기본, 실시설계용역	용역 1식	2017. 5. ~ 2018. 11.	658	270	85
왕궁배수지 건설공사	배수지 건설 V=8,800㎥ 송배수관 L=1,625m	2016. 4. ~ 2017. 12.	1,303	74	100
2017년 급수공사 GIS DB구축 용역	용역 1식	2017. 2. ~ 2018. 2.	40	12	100
2017년 상수도관망최적화 사업 GIS DB구축 용역	용역 1식	2017. 3. ~ 2018. 3.	53	16	100
2017년 익산시 상수도 누수탐사 용역	용역 1식	2017. 4. ~ 2018. 4.	180	54	100
2017년 노후관 교체공사	노후관교체 L=4.1km	2017. 11. ~ 2018. 12.	1,200	999	70

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□

해  당   없  음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산 현황

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

21. 국․도비 반납 현황

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

22. 2017년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

23. 2017년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양 기 주	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□

해  당   없  음

24. 2017년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□

해  당   없  음

25. 2017년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

26. 소송 사건 현황

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

사건명	사건개요	당사자		최초제소		진행상황	소관부서
		원고	피고	일자	관할법원
상하수도요금 반환	모현스파랜드 24시 사우나에 대한 2014. 2.~ 2016. 6. 까지 납부요금에 대하여 일반용이 아닌 대중탕용 요금을 적용하여 부과하고, 차액분 반환 청구 (※2016.7.15.조례 제1578호로 개정되기 전 대중탕용 요금은 찜질방등 타업종 겸업 수용가는 제외)	익산시	이영택 (모현스파랜드)	2017.3.1.	전주지방법원 군산지원	항소심 진행중 (1심:원고패)	상수도과

27. 시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□
작성자	:	요금계장		현정희	□
작성자	:	누수방지계장		나창균	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비고
	일 자	성 명	내 용
1	2017.1.11.	이＊＊	◦상수도검침원 등 불친절 신고	◦수시교육을 통해 유사사례가 발생되지 않도록 조치
2	2017.2.5.	이＊＊	◦상수도 설치지원 요청	◦제도 설명 후 개인급수 신청 안내
3	2017.6.23.	양＊＊	◦수돗물 곰팡이 냄새	◦가뭄 및 고온현상 등의 발생 원인 설명 완료
4	2017.7.17.	김＊＊	◦폐상수도 파이프 처리 요청	◦현장확인 후 처리완료
5	2017.8.7.	박＊＊	◦상수도 공사현장 먼지 날림	◦신속한 공사진행(도로포장) 안내
6	2017.9.6.	김＊＊	◦익산시 상하수도사업단 홈페 이지 개선 요구	◦홈페이지에서 요금자료 엑셀 다운 기능 탑재 완료
7	2017.9.14.	차＊＊	◦상수도관련 빌라 지하실 침수 긴급해결요청	◦현장확인 후 고인물 제거 완료
8	2017.9.20.	임＊＊	◦상수도관 매설 요청	◦예산확보 후 처리 안내
9	2017.12.15.	장＊＊	◦노후아파트 내 배관시설 교체 공사비 지원 문의	◦지원정책 없음 안내

감사자료 과 요구사항

1. 상수도 공기업 운영 사항

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	상수행정계장		한두련	□
작성자	:	요금계장		현정희	□

□ 현      황

○ 자    산  :  152,391백만원(자본 152,207   부채 184)

○ 총부채액

▸ 2016. 12. 31일 기준 :   164백만원

▸ 2017. 12. 31일 기준 :   184백만원

○ 부채비율  :  0.12%(부채총계 / 자기자본 × 100)

□ 추 진 실 적

○ 요금 부과․징수  :  부과액 26,545백만원, 징수액 25,258백만원(95.2%)

○ 여유자금 효율적 관리  :  예금액 70,000백만원(이자수입 95백만원)

2. 상수도 요금 부과징수 및 체납액 현황

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	요금계장		현정희	□

□ 부과징수 현황(2017년 결산결과)

(2017. 12. 31. 현재, 단위:백만원)

구 분	예산액 (A)	조정액 (B)	징수액 (C)	체납액 (D)	비 율
					B/A	C/B
합 계	27,935	26,545	25,258	1,287	95.0	95.2
가 정 용	11,574	11,458	10,796	662	99.0	94.2
일 반 용	8,035	7,364	7,001	363	91.6	95.1
대중탕용	71	231	215	16	325.4	93.1
산업용 및 전용공업용	8,255	7,492	7,246	246	90.8	96.7

□ 연도별 체납액 현황

(2017. 12. 31. 현재, 단위:백만원)

년도 업종	합 계	당해년도 (2017)	과년도
			계	2016	2015	2014	2013 이전
합 계	1,552	1,287	265	23	18	22	202
가 정 용	750	662	88	10	12	20	46
일 반 용	448	363	85	11	5	1	68
대 중 탕 용	38	16	22	0	-	-	22
산업용 및 전용공업용	316	246	70	2	1	1	66

□ 상수도사용료 체납액 현황(상위 20위)

(2017. 12.  31. 현재, 단위:천원)

연번	수 용 가 명	수전번호	주 소	체납액	체 납 년 도	비 고
계	20 건			68,482
1	상승**(주)	1591011	인화동	4,658	13년(7건)	단수
2	정*숙	1312436	함열읍	763	13년(7건)	단수
3	우남*****	1653878	모현동	25,117	14년(30건)	납부독려
4	황*하	1410514	성당면	1,933	14년(9건)	단수
5	김*영	1370063	웅포면	977	14년(11건)	단수
6	박*석	1351055	망성면	2,129	15년(6건)	단수 및 압류
7	(유)세*	1430369	삼기면	1,162	15년(9건)	단수
8	보*콘	1710961	영등동	921	15년(9건)	단수
9	익산기독교***	1702744	영등동	10,003	16년(5건)	단수 및 압류
10	의료법인경*****	1591112	인화동	1,929	16년(6건)	단수
11	훈산**	1560914	평화동	922	16년(15건)	단수
12	이**	1654320	모현동	5,355	17년(8건)	압류(소송중)
13	(주)그랜드*******	1560863	평화동	3,393	17년(4건)	압류
14	(주)넥**	1720280	신흥동	2,723	17년(1건)	단수(파산)
15	권**	1591073	인화동	1,325	17년(5건)	압류
16	오*지외4인	1654755	모현동	1,174	17년(2건)	납부독려
17	임*호	1590030	인화동	1,059	17년(3건)	납부독려
18	이*길	1760235	부송동	1,024	17년(3건)	단수
19	우석노인****	1680471	목천동	1,002	17년(1건)	납부독려
20	상승**(주)	1600303	인화동	913	17년(7건)	압류

3. 상수도 요금 부과 및 징수 현황

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	요금계장		현정희	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

◦ 급수전수 : 61,894전(가정용 47,443, 기타 14,451)

◦ 위탁검침원 관리 운영 : 총50명(남 10, 여 40)

◦ 노후계량기 교체 : 소구경(8년 경과분), 대구경(6년 경과분)

◦ 상수도요금 체납자 단수 및 체납처분(압류) 예고

□ 추 진 사 항

◦ 2017년도 상수도요금 부과징수 26,545백만원 ⇒ 25,258백만원(징수율95.2%)

※ 징수액은 2017.12.31.자 기준 수납액으로 2018.1.2.납기마감일 징수액이 반영되지 않은 금액임

◦ 위탁검침원 직무 및 친절교육 실시 : 12회

◦ 계량기 교체

- 노후계량기 교체  : 5,499전(소구경 5,484전, 대구경 15전)

- 기타(원격설치, 동파, 고장 등) : 643전(소구경 628전, 대구경 15전)

◦ 상수도요금 체납자 단수 및 체납처분(압류) 예고 : 466건

□ 기 대 효 과

◦ 철저한 검침원 직무교육으로 정확한 검침 및 투명한 부과체계 확립

◦ 체납징수반 상시운영으로 체납요금 징수율 제고를 통한 건실 재정 운영

◦ 노후 및 고장 계량기 등 신속교체로 정확한 계량을 통한 유수율 제고

4. 상수관망 최적화사업

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	누수방지계장		나 창 균	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 유수율제고사업

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5년)

◦ 사 업 비 : 40,929백만원(2017년 30억원)

◦ 사업규모

▸ 블록구축 31개소, 노후관교체 74km, 구역고립확인 31개소,  가압장 신설 4개소

□ 배수구역별 블록구축계획(최적화)                          (단위:개)

배수구역	계 획				비 고
	계	기구축	2017년	2018년 이후
계	43	12	11	20
신흥(SH)	11	-	11	-
금강(GG)	6	6	-	-
팔봉(PB)	20	6	-	14
광역(KO)	6	-	-	6

□ 추 진 사 항

◦ 신흥수계 SH01 ~ 11블록 구축공사(26억) 완료 ------------------------- 2017. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 상수도관망의 이상유무 및 적수발생에 대한 신속대응으로 시민불편 최소화

◦ 노후관 교체로 수돗물의 효율적 관리를 통해 양질의 수돗물 공급 가능

5. 급수구역확장 및 급·배수관 민원공사

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
계			1,234
급수구역 확장공사	함라면 진등마을	L=1.1km	42
	여산면 유점마을	L=1.7km	91
	함열읍 학선마을	L=1.8km	165
	금마면 구룡마을	L=0.2km	36
급·배수관 민원공사	익산시 일원	L=10.0km	900

.

□ 추 진 사 항

◦ 급수구역 확장공사 : 함라면 진등마을 외 3개소(4.8㎞, 334백만원) 준공

◦ 급·배수관 민원공사 : 영등동 인북로46길 외 410개소 급수민원 개선(900백만원)

□ 기 대 효 과

◦ 지하수 오염 및 용수부족으로 인한 농촌지역 주민 급수난 해결

◦ 수압 저하로 주민이 겪어온 급수불출 등의 불편 완전 해소

6. 안전하고 깨끗한 수돗물 생산 공급

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

□ 현       황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
계	195,300	127,165	100
자체 정수	90,000	70,689	56
광역상수도	105,300	56,476	44

□ 추 진 사 항

◦ 목표 수질기준 운영 : 원수( BOD 2㎎/L이하), 정수(탁도 0.15NTU이하)

◦ 수돗물 수질검사 강화

▸원수 수질검사 : 일일(5개), 주간(6개), 분기(31개 항목)

▸정수 수질검사 : 일일(7개), 주간(6개), 월간(59개 항목)

◦ 수질검사 결과 공표 : 익산시 홈페이지, 읍‧면‧동 게시판 등

◦ 수돗물품질보고서 작성 각 세대 배포 : 50,000부

◦ 민관합동 수질검사 및 수돗물평가위원회 실시 : 4회

□ 기 대 효 과

◦ 원·정수에 대한 수질관리 강화로 안전한 수돗물 생산 및 공급

◦ 안전하고 깨끗한 수돗물 안정적 공급으로 수돗물에 대한 신뢰도 제고7. 상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화

확인자	:	상수도과장		이 범 용	□
작성자	:	요금계장		현정희	□

□ 사 업 개 요

◦ 수전현황                                                (단위 : 전)

계	가정용	일반용	대중탕용	산업용	전용공업용
61,894	47,443	13,696	42	621	92

◦ 2017년 요금부과 및 징수 목표액  : 27,935백만원 / 27,655백만원(99.0%)

◦ 체납액 현황                                       (2017. 12. 31. 기준)

계	2017년도 부과분	2016년도 이전 부과분
1,552백만원	1,287백만원	265백만원

□ 추 진 실 적

◦ 2017년 상수도요금 부과 및 징수 실적

‣ 부과액/징수액 : 26,545백만원/25,258백만원(징수율95.2%)

‣ 과년도 체납액 징수 실적 : 492백만원/227백만원(46.1%)

* 징수액은 2017.12.31.자 기준 수납액으로 2018.1.2.납기마감일 징수액이 반영되지 않은 금액임

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영(2개반)

‣ 전화, 방문 체납 독려 및 단수 조치 : 529건

‣ 30만원 이상, 3회 이상 체납자 압류예고 : 466건/395백만원  ⇒ 징수 : 447건/346백만원

◦ 수도계량기 조사원(50명)담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

‣ 2회 체납 수용가 체납수도요금 안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

□ 기 대 효 과

◦ 체납징수반 상시운영을 통한 체납요금 징수율 제고로 건실 재정 운영

8. 수도정비 기본계획 및 배수지확장 기본실시

설계 용역

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□

□ 용 역 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 일원

◦ 용 역 비 : 658백만원(시비)

◦ 용역기간 : 2017. 5. 11. ~ 2018. 11. 1.(8개월)

◦ 내    용 : 익산시 수도정비기본계획 변경 및 금마배수지 증설(10,000㎥)

기본, 실시설계 1식

◦ 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링, ㈜퍼스트엔지니어링

.

□ 추 진 사 항

◦ 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인 요청     : 2018. 3. 15.

◦ 금마배수지 확장부지 지반조사 실시           : 2018. 4. ~ 5.

◦ 금마배수지 확장공사 설계서 작성 및 검토     : 2018. 4. 5.

◦ 수도정비기본계획(변경) 보완 요청 통보        : 2018. 6. 28.

◦ 수도정비기본계획(변경) 보완 회신            : 2018. 7. 11.

□ 기 대 효 과

◦ 읍면지역 지하수 오염 및 용수부족으로 인한 주민 급수난 해결

◦ 금마배수지 증설을 통한 비상시 대응성 향상 및 안정적인 상수도

공급체계 구축

9. 정수시설 운영관리

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□

□ 사 업 개 요

◦ 정수시설 현황

‣정수장 : 2개소(신흥, 금강)

‣배수지 : 7개소(신흥, 금강, 팔봉 2, 금마, 삼기, 왕궁)

‣가압장 : 2개소(금마, 삼기)

◦ 정수공급량 : 127,165㎥/일                     (2017년 12월말 기준)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급수량 (㎥/일)	비고
계		230,300	149,187
생활용수	소 계	195,300	127,165	100%
	신흥,금강	90,000	70,689	56%
	광 역	105,300	56,476	44%
공업용수	신 흥	35,000	22,022

□ 추 진 사 항

◦ 정수시설물 정밀점검 및 내진성능평가/정수시설부지 지반조사 용역 (2건/128백만원)

◦ 정수장 배수지 및 침전지 청소 (6건/82백만원)

◦ 정수장 시설물 보수 및 교체공사 시행 (25건/253백만원)

□ 기 대 효 과

◦ 각종 정수시설물의 보수․보강 등 체계적인 관리로 안정적 정수생산 및 공급

◦ 정수시설(침전지, 배수지)물 청소로 정수처리 효율증가 및 맑은 물 공급

10. 상수도 사용료 체납 및 단수 현황

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	요금계장		현정희	□

(단위 : 원)

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
계		188건						16,626,110
1	1310297	최**	함열읍	일반용	4	20170930	20171231	37,080
2	1310981	송**	함열읍	일반용	4	20170831	20171130	3,680
3	1311136	서**	함열읍	가정용	3	20170930	20171130	2,760
4	1311556	이**	함열읍	가정용	6	20170131	20170630	86,410
5	1312697	김**	함열읍	일반용	5	20170531	20170930	5,470
6	1311756	이**	함열읍	일반용	5	20170731	20171130	5,470
7	1311079	김**	함열읍	가정용	5	20170831	20171231	9,700
8	1312139	임**	함열읍	가정용	5	20170430	20170831	4,600
9	1312303	윤**	함열읍	가정용	6	20170131	20170630	5,520
10	1312430	전**	함열읍	가정용	3	20170131	20170331	2,760
11	1312151	양**	함열읍	일반용	5	20170430	20170831	73,740
12	1310404	최**	함열읍	가정용	9	20170131	20171031	9,310
13	1310662	5**호	함열읍	가정용	8	20170531	20171231	7,360
14	1310691	5**호	함열읍	가정용	6	20170131	20170630	5,520
15	1321598	김**	오산면	가정용	5	20170831	20171231	4,600
16	1322021	조**	오산면	가정용	4	20170630	20170930	4,710
17	1320265	김**	오산면	가정용	8	20170228	20170930	114,050
18	1320294	김**	오산면	가정용	6	20170731	20171231	6,030

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
19	1320568	조**	오산면	가정용	9	20170331	20171130	8,280
20	1320579	박**	오산면	가정용	5	20170131	20170531	6,140
21	1320703	양**	오산면	가정용	7	20170531	20171130	20,240
22	1321063	김**	오산면	가정용	3	20171031	20171231	2,760
23	1320727	김**	오산면	가정용	5	20170228	20170630	4,600
24	1321753	이**	오산면	가정용	3	20171031	20171231	38,700
25	1331386	최**	황등면	가정용	10	20170331	20171231	201,240
26	1332877	㈜보******	황등면	가정용	7	20170630	20171231	7,460
27	1332923	윤**	황등면	가정용	6	20170131	20170630	7,060
28	1340640	라**	용안면	가정용	6	20170131	20170630	5,520
29	1341326	전**	용안면	겸업종	5	20170131	20171130	55,000
30	1340295	남**	용안면	가정용	8	20170531	20171231	7,360
31	1340254	임**	용안면	가정용	3	20171031	20171231	2,760
32	1340352	이**	용안면	가정용	3	20170131	20170331	25,940
33	1341394	김**	용안면	가정용	6	20170731	20171231	7,060
34	1350866	정**	망성면	가정용	6	20170131	20170630	15,910
35	1351027	임**	망성면	일반용	3	20171031	20171231	54,560
36	1351548	박**	망성면	가정용	4	20170131	20170430	3,680
37	1351667	오**	망성면	가정용	5	20170228	20170630	5,110
38	1351677	오**	망성면	가정용	4	20170131	20170430	3,680

연번	수용가 번 호	수용가명	새 주 소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
39	1351108	서**	망성면	가정용	10	20170131	20171031	9,200
40	1351591	고**	망성면	가정용	9	20170430	20171231	9,810
41	1360015	강**	용동면	가정용	6	20170531	20171231	251,240
42	1370165	엄**	웅포면	가정용	4	20170131	20170430	12,530
43	1370096	이**	웅포면	가정용	4	20170930	20171231	5,210
44	1370734	산********	웅포면	일반용	6	20170430	20170930	467,800
45	1370613	전**	웅포면	가정용	7	20170228	20170831	6,950
46	1370452	채**	웅포면	가정용	3	20170131	20170331	2,760
47	1380047	황**	금마면	가정용	6	20170731	20171231	18,390
48	1380502	정**	금마면	가정용	6	20170731	20171231	6,540
49	1380146	진**	금마면	가정용	4	20170131	20170430	3,680
50	1380291	곽**	금마면	겸업종	6	20170228	20170731	497,640
51	1381078	장**	금마면	일반용	8	20170131	20171231	150,960
52	1381462	신**	금마면	가정용	5	20170331	20170731	4,600
53	1390353	이**	춘포면	겸업종	6	20170430	20170930	18,540
54	1390663	박**	춘포면	가정용	5	20170131	20170531	4,600
55	1391652	정**	삼례읍	가정용	3	20171031	20171231	2,760
56	1390762	한**	춘포면	가정용	5	20170131	20170531	4,600
57	1391367	최**	춘포면	가정용	3	20170131	20170331	2,760
58	1400266	김**	여산면	가정용	5	20170131	20170531	4,600

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
59	1401089	조**	여산면	가정용	5	20170831	20171231	4,600
60	1401008	김**	여산면	가정용	3	20170131	20170331	17,070
61	1400704	이**	여산면	가정용	5	20170228	20170630	4,600
62	1410168	이**	성당면	가정용	4	20170131	20170430	3,680
63	1410017	이**	성당면	가정용	4	20170131	20170430	88,900
64	1410070	김**	성당면	가정용	5	20170630	20171031	4,600
65	1410794	정**	성당면	가정용	8	20170131	20170831	7,360
66	1410483	김**	성당면	가정용	12	20170131	20171231	229,750
67	1410562	채**	성당면	가정용	5	20170831	20171231	4,600
68	1410735	김**	성당면	가정용	8	20170131	20170831	7,360
69	1420011	김**	왕궁면	가정용	3	20170131	20170331	5,330
70	1421159	국**	왕궁면	가정용	5	20170228	20170630	71,000
71	1420803	㈜지****	왕궁면	산업용	5	20170831	20171231	274,240
72	1420874	㈜지****	왕궁면	산업용	5	20170831	20171231	278,370
73	1430967	(유)우리****	삼기면	일반용	6	20170731	20171231	100,250
74	1431064	이**	삼기면	가정용	3	20171031	20171231	2,760
75	1430788	이**	삼기면	가정용	7	20170630	20171231	6,440
76	1510045	최**	창인동	가정용	12	20170131	20171231	11,040
77	1511171	이**	창인동	일반용	3	20170131	20170331	9,270
78	1511223	성**	창인동	가정용	4	20170930	20171231	3,680

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
79	1511211	김**	창인동	가정용	5	20170831	20171231	4,600
80	1511080	정**	창인동	일반용	3	20170930	20171130	59,660
81	1510429	임**	창인동	가정용	4	20170228	20170531	12,360
82	1520866	1-3**	창인동	가정용	10	20170228	20171130	9,200
83	1520890	1-5**	창인동	가정용	6	20170630	20171130	5,520
84	1521000	7-5**	창인동	가정용	6	20170731	20171231	5,520
85	1540073	곽**	중앙동	일반용	7	20170630	20171231	12,950
86	1550112	임**	중앙동	가정용	5	20170831	20171231	84,680
87	1550415	임**	중앙동	일반용	5	20170831	20171231	105,530
88	1550201	임**	중앙동	겸업종	7	20170630	20171231	6,440
89	1560914	훈산**	평화동	일반용	12	20170131	20171231	414,910
90	1560605	정**	평화동	가정용	7	20170630	20171231	6,440
91	1570181	유**	갈산동	가정용	5	20170831	20171231	4,600
92	1570052	고**	갈산동	가정용	4	20170131	20170430	12,360
93	1581064	홍**	주현동	일반용	3	20171031	20171231	33,390
94	1581309	정**	주현동	가정용	5	20170131	20170531	4,600
95	1580370	왕**	주현동	일반용	5	20170831	20171231	20,330
96	1590619	함**	인화동	일반용	3	20171031	20171231	13,270
97	1591205	고**	인화동	일반용	5	20170831	20171231	9,250
98	1590569	이**	인화동	가정용	6	20170731	20171231	5,520

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
99	1600203	윤**	인화동	가정용	12	20170131	20171231	11,040
100	1600550	박**	인화동	일반용	6	20170731	20171231	146,650
101	1600489	양**	인화동	산업용	6	20170131	20170630	18,540
102	1611982	1-5**	동산동	가정용	5	20170228	20170630	9,740
103	1611964	1-1**	동산동	가정용	6	20170531	20171031	5,520
104	1611999	2-4**	동산동	가정용	5	20170131	20170531	5,110
105	1614136	3-1**	동산동	가정용	4	20170930	20171231	13,560
106	1612912	4-4**	동산동	가정용	6	20170731	20171231	31,990
107	1614224	박**	동산동	가정용	6	20170131	20170630	5,520
108	1614254	김**	동산동	가정용	6	20170731	20171231	6,540
109	1613013	6-5**	동산동	가정용	4	20170930	20171231	3,680
110	1614077	6-4**	동산동	가정용	7	20170630	20171231	6,440
111	1613927	8-3**	동산동	가정용	4	20170930	20171231	6,240
112	1613146	9-3**	동산동	가정용	6	20170131	20170630	5,520
113	1613151	9-3**	동산동	가정용	4	20170930	20171231	3,680
114	1612660	11-4**	동산동	가정용	6	20170131	20170630	5,520
115	1612818	2-4**	동산동	가정용	8	20170531	20171231	16,410
116	1613939	남**	동산동	일반용	7	20170531	20171130	29,170
117	1611638	7-1**	동산동	가정용	3	20170131	20170331	7,390
118	1611821	12-3**	동산동	가정용	7	20170630	20171231	14,680

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
119	1623746	김**	마동	일반용	7	20170331	20170930	12,950
120	1623484	최**	마동	가정용	4	20170930	20171231	26,320
121	1620420	최**	마동	가정용	3	20171031	20171231	180,920
122	1620971	김**	마동	가정용	11	20170131	20171130	17,120
123	1620525	김**	마동	가정용	5	20170228	20170630	9,250
124	1623594	최**	마동	일반용	6	20170531	20171031	8,140
125	1621630	2-2**	마동	가정용	7	20170228	20170831	11,540
126	1621722	5-4**	마동	가정용	3	20171031	20171231	13,570
127	1621809	7-4**	마동	가정용	6	20170731	20171231	10,150
128	1621926	10-4**	마동	가정용	5	20170131	20170531	4,600
129	1622441	3-3**	마동	가정용	5	20170831	20171231	5,620
130	1630759	백**	남중동	가정용	5	20170731	20171130	27,790
131	1630361	안**	남중동	가정용	4	20170930	20171231	8,310
132	1633403	진**	남중동	가정용	3	20170131	20170331	10,300
133	1632429	이**	남중동	가정용	5	20170131	20170531	4,600
134	1632001	씨-3**	남중동	가정용	9	20170131	20171031	16,630
135	1640558	황**	남중동	일반용	9	20170131	20170930	8,280
136	1640507	박**	남중동	가정용	4	20170131	20170430	3,680
137	1640627	박**	남중동	가정용	5	20170131	20170531	4,600
138	1651628	김**	모현동	가정용	3	20171031	20171231	2,760

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
139	1654831	5**호	모현동	가정용	4	20170930	20171231	5,220
140	1652050	이**	모현동	일반용	9	20170430	20171231	28,890
141	1654677	농업회사법인(유)아이**	모현동	일반용	7	20170630	20171231	92,470
142	1654017	지**	모현동	일반용	4	20170131	20170430	12,360
143	1654325	최**	모현동	일반용	7	20170430	20171231	8,300
144	1652439	5**	모현동	가정용	4	20170930	20171231	3,680
145	1652148	김**	모현동	가정용	6	20170331	20170831	5,520
146	1650088	노**	모현동	가정용	4	20170131	20170430	3,680
147	1650082	서**	모현동	가정용	6	20170228	20170731	5,520
148	1652706	최**	모현동	가정용	4	20170131	20170531	4,190
149	1660188	씨-1**	모현동	가정용	9	20170131	20170930	14,410
150	1670068	이**	송학동	가정용	8	20170228	20170930	7,360
151	1670846	장**	송학동	가정용	6	20170731	20171231	5,520
152	1670608	김**	송학동	가정용	6	20170731	20171231	18,280
153	1670917	박**	송학동	가정용	8	20170131	20170831	7,360
154	1670730	이**	송학동	가정용	8	20170531	20171231	7,360
155	1690267	최**	신용동	가정용	4	20170630	20170930	3,680
156	1690907	박**	신용동	가정용	3	20171031	20171231	2,760
157	1690797	강**	신용동	가정용	4	20170731	20171031	3,680
158	1690276	최**	신용동	가정용	4	20170831	20171130	12,360

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
159	1703271	(유)마라**	영등동	일반용	6	20170731	20171231	11,100
160	1703497	박**	영등동	가정용	5	20170831	20171231	4,600
161	1702744	익산기독교***	영등동	일반용	3	20170131	20170331	8,741,300
162	1702652	심**	영등동	일반용	5	20170831	20171231	9,250
163	1712310	김**	어양동	가정용	4	20170930	20171231	9,340
164	1710961	보**	영등동	산업용	5	20170630	20171031	655,630
165	1730328	조**	금강동	겸업종	4	20170831	20171130	3,680
166	1730139	박**	금강동	가정용	3	20171031	20171231	3,790
167	1740159	이**	석탄동	가정용	3	20171031	20171231	2,760
168	1750110	㈜세종**	용제동	산업용	5	20170131	20170531	46,350
169	1751188	㈜세종**	용제동	전용공업용	5	20170131	20170531	46,610
170	1750524	임**	팔봉동	가정용	8	20170331	20171031	7,360
171	1750914	정**	팔봉동	가정용	4	20170331	20170630	3,680
172	1751231	고*	석왕동	가정용	4	20170131	20170430	7,400
173	1751004	이**	팔봉동	가정용	5	20170430	20170831	4,600
174	1760235	이**	부송동	대중탕용	3	20171031	20171231	1,024,020
175	1760718	익산**	부송동	일반용	4	20170930	20171231	3,680
176	1760797	이**	부송동	일반용	6	20170531	20171031	7,260
177	1760642	김**	부송동	일반용	9	20170430	20171231	27,810
178	1771904	신동**	신동	일반용	4	20170930	20171231	57,880

연번	수용가 번 호	수용가명	새주소	업종	횟수	체납시작	체납끝	체납합계	비고
179	1774017	윤**	신동	가정용	5	20170731	20171130	4,600
180	1773452	이**	신동	일반용	7	20170430	20171031	309,650
181	1773780	강**	신동	일반용	6	20170731	20171231	5,520
182	1774248	정**	신동	일반용	4	20170930	20171231	231,470
183	1773651	김**	신동	일반용	6	20170131	20170630	11,100
184	1774215	정**	신동	가정용	4	20170930	20171231	8,310
185	1780106	한**	월성동	가정용	3	20170131	20170331	2,760
186	1800311	허**	낭산면	가정용	4	20170930	20171231	3,680
187	1810214	(유)금강**	함라면	겸업종	4	20170930	20171231	50,620
188	1820063	권**	정족동	가정용	5	20170131	20170531	4,600

11. 배수지 관리 현황(배수지 현황 등)

확인자	:	상수도과장		이범용	□
작성자	:	정수생산계장		김경희	□
작성자	:	급수시설계장		양기주	□

시설명	용도	위 치	시설용량 (㎥)	준공년도	비고
계			64,300		19지
신흥	생활	신흥동 산50번지	18,500	1974	4지
금강	생활	금강동 612번지	7,700	1953	5지
팔봉	생활	팔봉동852	11,250	1998	2지
	공업		8,000	1995	2지
금마	생활	금마면 서고도리 산29-7	5,000	2003	2지
삼기	공업	낭산면 용기리 1950	5,050	2012	2지
왕궁	생활	왕궁면 동용리 산70번지 일원	8,800	2017	2지