경영개발과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 주요성과 및 반성
□	2018 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
기업이 필요로 하는 최고･최적의 산업용지 제공 및 배후도시 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	기업유치 촉진을 위한 정주 기반시설 조성 농촌지역 균형발전을 위한 전문 농공단지 조성 공영개발 특별회계의 효율적 운영으로 재정의 건실화 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	익산 일반산업단지 진입도로 개설공사 함열농공(LED집적화)단지 조성사업 익산 부송4지구 도시개발사업

일   반   현   황

□ 기        구

					경영개발과
경영행정						용지보상								경영개발

□ 정  ․  현   원

(정원/현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13		1	5	4	3
현 원	11		1	5	3	1	1
증 감	△2		-	-	△1	△2	1

□ 사  무  분  장

◦ 경영 행정 : 공영개발사업 기획 및 조정, 공영개발사업 계약업무,

공영개발사업특별회계 예산 및 자금운용

◦ 용지 보상 : 용지분양 계획수립 및 추진, 경영평가 분석, 용지매입 및 보상, 지적공부정리, 토지수용  및  공탁, 공유재산 관리

◦ 경영 개발 : 익산일반산업단지 진입도로 개설사업, 함열농공(LED집적화)  단지 조성사업, 익산부송4지구 도시개발사업

2018 예산집행실적

【 2018. 10. 15. 현재 】                                    (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
경영개발과				43,080,862	28,250,289	14,830,573	65.6
	영업비용			1,247,568	854,984	392,584	68.5
		일반관리비		1,247,568	854,984	392,584	68.5
			인건비	810,968	528,691	282,277	65.2
			직무수행경비	39,360	26,228	13,132	66.6
			일반운영비	171,320	134,599	36,721	78.6
			여비	31,040	19,834	11,206	63.9
			업무추진비	9,040	5,336	3,704	59.0
			복리후생비	10,920	7,630	3,290	69.9
			포상금	43,884	35,097	8,787	80.0
			연금부담금 등	131,036	97,569	33,467	74.5
	재고자산취득			17,660,456	4,225,305	13,435,151	23.9
		용지조성사업비		15,130,899	1,985,661	13,145,238	13.1
			시설비및부대비	15,130,899	1,985,661	13,145,238	13.1
		재고자산건설자금이자		2,529,557	2,239,644	289,913	88.5
			차입금이자상환	2,529,557	2,239,644	289,913	88.5
	비유동부채상환			24,020,000	23,170,000	850,000	96.5
		금융기관차입금 원금상환		24,020,000	23,170,000	850,000	96.5
			차입금원금상환	24,020,000	23,170,000	850,000	96.5
	예비비			152,838	0	152,838	0
		예비비		152,838	0	152,838	0
			예비비	152,838	0	152,838	0

2018 주요성과 및 반성

□ 성    과

◦함열농공(LED집적화)단지 조성사업 추진

▸ 함열농공(LED집적화)단지 지정 및 실시계획 변경

∙개발기간(1차) : (당초) 2013 ~ 2016 → (변경) 2013 ~ 2017.  : 2017.  3.

∙개발기간(2차) : (당초) 2013 ~ 2017 → (변경) 2013 ~ 2018.  : 2017. 12.

▸ 토지 매입 및 보상                                : 100%

▸ 공사추진(토공 및 연약지반 처리)                  : 공정율 98%

◦3산업단지 지원시설용지 투자 적정규모로 분양면적 조정 및      용적율 변경

▸ 분양면적(400평⇒200평) 조정

∙37필지 → 55필지(18필지 증)

▸ 공동주택 용적율 상향(200%⇒250%) 및 최고층수 규제완화(4층⇒10층)

◦익산일반산업단지 분양계약 체결

▸ 산업단지 분양계약               : 12개업체(272,103㎡) 33,544백만원

∙제3산업단지 산업용지          :  9개업체(255,268㎡) 31,628백만원

∙제3산업단지 쥬얼리단지        :  1개업체(  6,915㎡)    856백만원

∙제4산업단지 산업용지          :  2개업체(  9,920㎡)   1,060백만원

□ 반    성

◦함열농공(LED집적화)단지 분양활성화를 위하여 입주업종 다양화와 건폐율 상향 조정 등 입주조건을 대폭 완화하였으나 분양이 저조한 실정으로 실질적인 분양활성화 대책을 강구하여 기업 유치에 최선을 다하겠음

2018주요업무결산

		익산일반산업단지 진입도로 개설공사 함열농공(LED집적화)단지 조성사업 함열농공단지 진입로 확장공사 익산 부송4지구 도시개발사업

1		익산일반산업단지 진입도로 개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산제3일반산업단지(낭산면) ~ 연무 IC(논산시 연무읍)

◦ 사업내용 : 도로신설 L=11.86㎞(4차로), 교량신설 19개소(1,245m)

◦ 사업기간 : 2010.  2 ~ 2021. 12

◦ 총사업비 : 1,629억원(공사비 1,209억, 보상비 등 420억)

◦ 현재까지 확보액 : 1,103억(국비 809억, 도비 27억, 시비 267억)

▸ 2017년 예산액 : 150억(시비 본예산 50억, 1회추경 100억 확보)

□ 추 진 실 적

◦ 공사(5차분) 준공	2016.  9.

◦ 문화재 시굴조사 실시	2017. 10.

▸ 4개지역 52,973㎡ (10.30 완료)

◦ 6차분 착공	2018.  6.

▸ 공사기간 : 2018.  6 ~ 2018. 12

□ 마무리 대책

◦ 공사(6차분) 준공	2018. 12.

2		함열농공(LED집적화)단지 조성공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열읍·용안면 일원

◦ 사업내용 : LED전문단지 조성(329천㎡)

◦ 사업기간 : 2011.  3. ~ 2018. 12.

◦ 총사업비 : 350억원(국비 30억, 도비 5억, 시비(출자금) 2억, 민간 313억)

◦ 현공정율 : 98%

◦ 시 행 자 : 익산엘이디협동화단지개발(주)

□ 추 진 실 적

◦ 문화재 발굴조사 완료	2016.  2.~6.

▸ 발굴면적 : 33,700㎡(전체 사업면적 : 329,000㎡, 대비 10.2%)

◦ 토지수용 재결(전라북도 지방토지수용위원회)	2016.  3.

◦ 토지수용 공탁 완료(35필지, 47,196㎡)	2016.  5.

◦ 함열농공(전문)단지 관리기본계획 고시	2016.  7.

◦ 공사 추진(토공 및 연약지반 처리)	2016.  9.

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공	2018. 11.

◦ 사업 준공	2018. 12.

3		함열농공(LED집적화)단지 진입로 확장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 국도 23호선 ~ 익산 함열 농공단지 진입로 지구계

▸ 도시계획도로 중로1-2호선(전라북도고시 제76호 1979.4.23.)

◦ 사업내용 : 도로확포장 L=294m B=12→20.5m

◦ 사업기간 : 2016.  7 ~ 2018.  6

◦ 사 업 비 : 15억원(공사비 13억,  보상비 2억)

◦ 현공정율 : 100%

◦ 시 행 자 : (유)성문건설

□ 추 진 실 적

◦ 농공단지 진입로 확장공사 실시설계	2016.  8.

◦ 도시관리계획 결정(도로) 변경 협의	2016.  9.

◦ 도시관리계획 결정(도로) 변경	2016. 10.

◦ 실시계획인가 및 설계심의	2016. 11.

◦ 공사 착공	2017.  5.

◦ 공사 준공	2018.  6.

4		익산 부송4지구 도시개발사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 부송동 일원 (신재생자원센터 주변)

◦ 사업내용 : 주거용지, 상업용지, 학교용지 등 (294천㎡)

◦ 사업기간 : 2011. 2 ~ 2021. 12.

◦ 총사업비 : 387억원(조성비 208억, 보상비 90억, 기타 89억)

□ 추 진 실 적

◦ 도시개발구역지정 및 개발계획수립(안) 공청회 개최	2016.  1.

◦ 시 도시계획위원회 자문	2016.  3.

◦ 도시개발구역지정 및 개발계획 승인신청(익산시→전북도)	2016.  4.

◦ 전략환경영향평가 본안 협의 완료	2017.  4.

◦ 전라북도 도시계획심의위원회 심의 부결	2017.  8.

◦ 주민설명회 개최	2017.  9. 28.

▸ 道 도시계획위원회 부결사유 및 익산시 추진상황 설명

◦ 주민의견청취 및 市관련부서 협의	2018.  2.~3.

▸ 면적 축소 및 토지이용계획 변경하여 재추진

◦ 주민공청회	2018.  3.  6.

◦ 市 도시계획위원회 자문	2018.  4. 17.

□ 금 후 계 획

◦ 道와 협의 중으로 도지사 승인(道도시계획위원회 재상정) 요청할 계획임.