2018. 10. 29.

제213회 익산시의회(임시회)

2018 주요업무 결산보고

	건설교통국

도시재생과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 주요성과
□	2018 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 행복한 품격도시 익산건설을 위해 시민 중심의 도시 계획과 개발 및 관리

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	미래지향적인 도시계획수립 인간과 환경을 중시하는 도시개발 시민중심의 도시문제 해소

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	시민이 공감하는 도시관리계획으로 지역간 균형발전 도모 친환경적이고 생활을 중시하는 도시개발 원도심 재생을 통한 생활환경개선 및 지역활성화

일   반   현   황

□ 기     구

						도시재생과
재생행정			도시계획			도시개발				재생디자인			재생시설			자전거정책

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	1	6	7	6	4
현 원	24	1	1	9	8	3	2
증 감	△1			3	1	△3	△2

□ 사 무 분 장

◦ 재생행정  :  국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 개발행위 허가

◦ 도시계획  :  도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정

◦ 도시개발  :  도시계획 도로개설 사업 시행

◦ 재생디자인  :  도시재생활성화사업, 경관기본계획 및 공공디자인기본계획수립

◦ 재생시설  :  새뜰마을 사업, 도시재생 시설사업

◦ 자전거정책  :  자전거정책 수립, 자전거도로 계획수립 및 시행

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.925	76.089	214.813	194.070	21.954	-
비율(％)	100	15.0	42.5	38.3	4.3	-

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	77.428	17.901	1.870	10.470	47.187	-
비율(％)	100	23.1	2.4	13.5	61.0

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	경관지구	미관지구	고도지구	방화지구	보존지구 (역사문화환경 보존지구)	취락지구 (자 연 취락지구)	비 고
지구수	135	3	29	10	9	1	83	-
면 적	20,283	12,680	2,478	985	1,202	202	2,736	-

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : ㎡, 백만원, %)

시 설 명		시설결정		집행시설		미집행시설			집행률 (%)
		개소	면적	개소	면적	개소	면적	사업비
총 계		2,008	30,675,428	1,856	25,263,843	152	5,411,585	602,464	82.4
도로	소 계	1,430	10,944,603	1,322	10,288,971	108	655,632	165,516	94.0
	광 로	6	1,266,624	5	1,181,630	1	84,994	8,500	93.3
	대 로	68	3,290,601	44	2,926,838	24	363,763	101,659	88.9
	중 로	339	3,915,938	322	3,800,735	17	115,203	26,671	97.1
	소 로	1,017	2,471,440	951	2,379,768	66	91,672	28,686	96.3
공원	소 계	105	5,853,038	83	1,762,109	22	4,090,929	389,890	30.1
	근린공원	50	5,215,711	31	1,341,612	19	3,874,099	364,847	25.7
	역사공원	2	76,461	1	50,593	1	25,868	3,945	66.2
	수변공원	2	28,058	1	8,512	1	19,546	4,886	30.3
	어린이공원	39	91,130	39	91,130	0	0	0	100.0
	소공원	10	36,659	10	36,659	0	0	0	100.0
	문화공원	1	35,279	1	35,279	0	0	0	100.0
	묘지공원	1	369,740	0	198,324	1	171,416	16,212	53.6
녹지	소 계	99	1,188,984	84	575,376	15	613,608	40,803	48.4
	완충녹지	79	1,124,936	65	514,898	14	610,038	40,595	45.8
	경관녹지	16	58,288	15	54,718	1	3,570	208	93.9
	연결녹지	4	5,760	4	5,760	0	0	0	100.0
기타	소 계	374	12,688,803	367	12,637,387	7	51,416	6,255	99.6
	주차장	49	149,033	49	149,033	0	0	0	100.0
	광 장	32	677,209	27	666,100	5	11,109	1,366	98.4
	공공청사	16	197,203	16	197,203	0	0	0	100.0
	유원지	1	31,200	0	0	1	31,200	4,068	0.0
	운동장	1	260,000	0	250,893	1	9,107	821	96.5
	기 타	275	11,374,158	275	11,374,158	0	0	0	100.0

2018 예산집행실적

【 2018. 10. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도시재생과					31,216,474	12,171,936	19,044,538	39
	도시개발관리				30,993,261	12,095,733	18,897,528	39
		도시계획			1,750,579	360,560	1,390,019	21
			도시계획관리		1,745,579	358,060	1,387,519	21
				일반운영비	73,816	60,433	13,383	82
				여비	42,560	31,500	11,060	74
				업무추진비	13,000	11,933	1,067	92
				시설비	1,616,203	496,203	1,120,000	31	사고이월
			전국체전 및 장애인체전		5,000	2,500	2,500	50
		도시계획도로개설(대로)			4,311,935	2,664,476	1,647,459	62
			도･농 연결도로개설		396,499	374,121	22,378	94	이월포함
			마한로 미개설구간 도로개설		2,995,346	1,390,180	1,605,166	46	이월포함
			KTX 서부역사 진입로 확장사업		822,000	821,577	423	99.9
			산업도로(대로1류2호) 확장공사		10,675	10,675	0	100	계속비이월
			목천동원주@~우석장례 예식장간 도로확장		13,522	5,814	7,708	43	명시이월
			안전한 보행환경 조성사업		73,893	62,109	11,784	84	명시이월
		도시계획도로개설(중로)			2,933,250	1,976,697	956,553	67
			남부지구 중로2류43호 도로개설		288,199	1,277	286,922	0.4	이월포함
			춘포면사무소~춘포역간 도로개설		578,497	470,410	108,087	81	이월포함
			명일아파트옆(중로2류2호) 도로개설		400,000	34,428	365,572	9
			황등 중로(2차) 도로개설		291,680	291,680	0	100	사고이월
			모현동 배산~장신택지간 도로개설		1,374,874	1,178,902	195,972	86	이월포함
		도시계획도로개설(소로)			5,205,679	2,163,907	3,041,772	42
			함열 소로3류~10호선 도로개설		199,000	1,337	197,663	1
			모현동 소로3-49호선 도로개설		350,000	53,244	296,756	15	이월포함

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			영등동 청아아파트옆 외 3개노선 도로개설	37,226	29,984	7,242	80.5	이월포함
			함열 미력리(소로1류8호) 도로개설	694,820	676,073	18,747	97	이월포함
			미불용지 보상	1,024,858	816,869	207,989	80	이월포함
			소라산~영등소라성당간 도로개설	995,200	10,373	984,827	1
			함열미력리(소로1류7호, 소로2류39호) 도로개설공사	500,000	35,978	464,022	7
			구 모현동사무소 옆 도로개설	239,512	235,122	4,390	98	이월포함
			함열 동지산 진입도로 개설	300,000	112,940	187,060	38	명시이월
			금마시장뒤 도로개설	233,168	2,622	230,546	1	명시이월
			황등도서관 진입로 확장공사	13,584	12,852	732	95	사고이월
			송학동 망기마을 진입로 개설	33,431	0	33,431	0	명시이월
			송학동 학곤선 (소로3류66호)도로개설	234,880	176,513	58,367	75	명시이월
			모현동 배산로24길(소로3류15호) 도로개설공사	350,000	0	350,000	0
		신규 도시개발 사업		4,637,974	2,484,165	2,153,809	54
			함열 금호맨션 앞 (소로2류2호) 도로개설	199,000	5,363	193,637	3
			동익산역 진입도로개설	100,000	81,849	18,151	82
			송학동(소로3-89) 도로개설공사	200,000	169,703	30,297	85
			황등면 신흥석재앞 교차로 가각부 개선공사	89,550	0	89,550	0	이월포함
			신동(소로3-101) 도로개설공사	565,465	492,003	73,462	87	이월포함
			송학동 학곤선 (대로3류7호) 도로개설	2,680,000	1,278,451	1,401,549	48
			용안면 한양식당 옆 도로개설	166,367	112,044	54,323	67	명시이월
			모현동 롯데슈퍼 옆 도로개설	450,000	186,206	263,794	41	명시이월

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			송학동 포스코아파트 앞 도로개설	30,572	26,107	4,465	85	이월포함
			어양동 함지박 옆 가각부 개선공사	64,886	47,907	16,979	74	명시이월
			남중동 소로2류144호 도로개설	81,242	74,263	6,979	91	명시이월
			익산역 안내간판 설치공사	10,892	10,269	623	94	명시이월
		도시경관디자인 조성		967,164	701,303	265,861	73
			도시디자인	278,090	157,945	120,145	57	이월포함
			도시경관 개선사업	632,600	536,704	95,896	85	이월포함
			경관협정 지원사업	56,474	6,654	49,820	12	이월포함
		도시재생		10,460,707	1,379,365	9,081,342	13
			도시재생사업	937,480	30,330	907,150	3
			도시재생 아카데미 및 지원센터 운영	31,400	16,400	15,000	52
			지역역량강화 (도시활력증진지역개발)	60,000	17,000	43,000	28
			재생시설	22,968	8,457	14,511	37
			취약지역 개조 (도시/새뜰마을사업)	2,495,279	849,045	1,646,234	34	이월포함
			취약지역 개조 (도시/동산동 월담지구 새뜰마을사업)	1,538,580	458,133	1,080,447	30	이월포함
			도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)	5,375,000	0	5,375,000	0
		자전거도로 이용시설 활성화사업		752,973	365,260	360,713	50
			자전거도로 이용시설 활성화사업	725,973	365,260	360,713	50	이월포함
	행정운영경비			113,213	76,203	37,010	67
			인력운영비	76,766	41,422	35,344	54
			기본경비	36,447	34,781	1,666	95
특별회계				110,000	0	110,000	0
		장기미집행 도시계획		110,000	0	110,000	0

2018 주요성과

□ 성      과

◦ 도시재생 사업으로 원도심 지역 활성화에 기여

▸익산시 도시재생(중심시가지형)활성화계획 수립 및 국토부 승인

▸2018 소규모 도시 재생사업 공모 선정 : 2018. 7.

- 사업명 : 주민참여 근대 건축물의 보전 및 활용에 의한 지역 활성화

- 사업비 : 100백만원(국비5, 도비1, 시비 4)

▸도시재생 아카데미(심화과정) 운영 : 2018. 5. 23. ~ 5. 24.

- 팀별 집중 검토회의를 통한 지역의제 발굴

▸찾아가는 도시재생 아카데미 운영 : 2018. 9. ~ 10.

◦ 도시계획도로 개설을 통한 시민 편익증진 기여

▸구)모현동사무소 옆 도로개설(L=560m, B=8m)

▸모현 배산~장신택지간 도로개설(L=145m, B=20→25m)

▸도･농 연결 도로 개설(L=150m, B=50m)

◦ 자전거 이용 활성화 사업으로 자전거 이용자 만족도 증가

▸익산시 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 완료

- 5개년 사업계획 설정(27개노선 29Km, 2,350백만원)

▸익산시민 자전거 보험 가입

- 사망 및 후유장애, 진단 위로금 지원 등

▸웅포 곰개 나루 자전거 대여소 운영

- 4월~6월, 9월~11월(주말 및 공휴일 운영), 자전거 무료 대여(50대)

□ 반      성

◦ 도시계획도로 개설 공사 편입 토지 보상 협의 어려움으로 공사 지연

▸소유주 지속적인 설득 및 협의로 적기 공사 추진

2018 주요업무결산

		도시관리계획(재정비)수립용역 도시재생 중심시가지형 뉴딜사업 KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업 동산동 월담지구 새뜰마을사업 익산시 기본경관계획 재정비 수립용역 송학동 학곤선 도로개설 함열 미력리 도로개설 자전거이용 활성화 사업 전국체전대비 주요 간선도로변 벽화조성

1		도시관리계획(재정비) 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업범위 : 익산시 전지역(506.925㎢) / 10년계획

◦ 사업기간 : 2016. 5. ~ 2019. 5.

◦ 사 업 비 : 842백만원

◦ 내    용 : 익산시 도시관리계획 전반에 대한 재검토

▸익산시 여건변화를 수용한 용도지역․지구, 도시기반시설 계획 등 전반 재검토

▸관련법 개정 등 제도변화에 따른 후속조치(토지적성평가, 재해취약성분석 등)

□ 추 진 실 적

◦ 도시관리계획 용역 착수	: 2016. 5. 20.

◦ 현황조사 및 분석	: 2016. 5. ~ 2017. 5.

▸지역현황조사, 민원분석 및 현장조사

▸토지적성평가, 재해취약성분석, 교통성, 경관성, 사전재해영향성검토

◦ 장기미집행 도시계획시설 폐지(변경) 추진	: 2017. 6. ~ 2018. 3.

▸주민의견수렴, 관계기관 부서 협의, 도시계획위원회 심의 등

▸미집행 도시계획시설(도로 등) 277개소 변경(해제)

◦ 도시관리계획 재정비 변경안 작성	: 2018. 1. ~ 2018. 10.

□ 마무리 대책

◦ 도시관리계획 재정비 입안	(안) 입안	: 2018. 11.

◦ 주민의견수렴, 기관부서협의 등 관련 절차 이행	: 2018. 11.~12.

▸주민의견청취(공람 공고, 설명회 등) 14일 이상

▸의회의견청취

▸관련기관부서협의(환경, 재해, 교통, 문화재, 농지, 산지 등 전반)

◦ 시 도시계획위원회 자문 및 심의	: 2019. 1.

▸자문 : 전북도 결정사항

▸심의 : 시장 결정사항

◦ 전북도 결정신청, 도 도시계획위원회 심의･결정고시	: 2019. 1. ~ 5.

2		도시재생 중심시가지형 뉴딜사업

□ 사 업 개 요

◦  사 업 명 : 역사가(驛史街) 문화로(文化路)

◦  위    치 : 익산시 중앙동1가 24번지 일원(원도심 지역)

◦  사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)

◦  사업면적 : 185,007㎡

◦  사 업 비 : 270억(국 150 도25 시 75, 기타20)

◦  사업내용 : 기초생활인프라 조성, 상권활성화사업, 생활환경개선사업

공기업참여사업(공공상가임대사업), 문화관광자원화사업,

특화거리조성, 도시재생대학 및 도시재생 비지니스육성 등

□ 추 진 실 적

◦ 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 공모 선정	2017. 12. 14.

◦ 도시재생 선도지역 지정	2018. 5. 1.

◦ 활성화계획(안) 실현가능성 및 타당성평가 요청서 제출	2018. 6. 8.

◦ 활성화계획 수립(안) 익산시 도시재생위원회 심의	2018. 6. 19.

◦ 활성화계획 수립(안) 승인 신청(국토교통부)	2018. 6. 20.

◦ 실현가능성 및 타당성 평가결과 통보	2018. 7. 17.

▸조건부 통과(3개 단위사업 보류)

◦ 도시재생 활성화계획 승인 통보	2018. 8. 3.

▸조건부 승인(보류된 3개 단위사업에 대해 국가재정지원 보류)

◦ 활성화계획 변경 및 실행방안 수립용역 발주	2018. 9. 3.

▸조건부여 및 권고의견에 대한 보완 및 활성화계획 변경

◦ 특화거리 조성(3개소) 기본 및 실시설계 용역 발주	2018. 10. 11.

▸창업지원 어울림플랫폼 커뮤니티 연결로, 교복문화거리, 문화 이리로 거리

□ 마무리 대책

◦ 조건부 사항 도시재생실무위원회 재심의(국토교통부) : 2018. 12.

◦ 연차별 추진계획에 따른 단위사업(15개) 추진        : 2019. ~ 2022.

3		KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원 (면적 : 35,089㎡)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4개년)

◦ 총사업비 : 6,924백만원(국비 4,368, 도비 578, 시비 1,978)

◦ 사업내용 : 도로개설, 철도변 완충녹지 정비, 도시가스공급, 경로당 신축, 집수리, 주민역량강화 및 마을공동체 지원사업 등

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2017년 이전	2018년			비고
			소계	확보	미확보
총계	6,924	4,986	1,938	1,938
국비	4,368	3,160	1,208	1,208
도비	578	423	155	155
시비	1,978	1,403	575	575

□ 추 진 실 적

◦ 관사마을 주민공동이용시설 민간위탁 시행(주민협의체)	: 2018. 2.

◦ 완충녹지조성 및 가로환경개선사업 실시설계 착수	: 2018. 3.

◦ 주민역량강화 프로그램 완료	: 2018. 5.

◦ 지방토지수용위원회 수용 결정(승무원숙사)	: 2018. 6.

◦ 도로편입부지내 익산역 승무원 숙사 이전	: 2018. 10.

□ 마무리 대책

◦ 도로개설공사 완료	: 2018. 12.

◦ 좁은 골목길 확장 및 완충녹지 조성 공사	: 2018. 11. ~ 2019. 6.

◦ 주민 휴먼케어 사업 추진	: 2019. 1. ~ 2019. 12.

4		동산동 월담지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 동산동 356번지 일원(사업면적 약43,300㎡)

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2019.(4개년) / 사업면적 약50,456㎡

◦ 사 업 비 : 3,436백만원(국비 2,405, 도비 309, 시비 722)

◦ 사업내용 : 주택정비 지원,  안전확보, 생활 ･ 위생인프라, 마을공동체   지원사업,  주민역량강화사업 등

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2017년 이전	2018년			비고
			소계	확보	미확보
총계	3,436	914	972	972		1,550
국비	2,405	640	680	680		1,085
도비	309	82	87	87		140
시비	722	192	205	205		325

□ 추 진 실 적

◦ 사면보강 및 마을안길정비사업 실시설계 착수	: 2018. 3.

◦ 일부주민 사업취소요구에 따른 주민 면담	: 2018. 3. ~ 7.

◦ 주민설득에 따른 공사 및 용역 재착수	: 2018. 7.

◦ 새뜰마을사업 마스터플랜 변경승인                 : 2018. 7.

▸사업면적 감 50456→43,300㎡, 총사업비 3,849→3,436백만원

□ 마무리 대책

◦ 산사태위험지역 개선공사 준공	: 2018. 11.

◦ 사면보강사업 및 마을안길 공사	: 2018. 11. ~ 2019. 10.

◦ 주택정비사업 추진	: 2018. 11. ~ 2019. 12.

5		익산시 기본경관계획 재정비 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역대상 : 익산시 전지역(506,925㎡)

◦ 용역기간 : 2017. 5. 23. ~ 2018. 9. 11.

◦ 용 역 비 : 286백만원

◦ 용역내용

▸경관계획 재정비 : 경관‧미관지구, 중점관리구역 재정비

▸공공디자인 진흥계획 수립 : 공공시설물디자인 가이드라인 수립

◦ 용역수행자 : ㈜도화엔지니어링, ㈜도시경관연구소 율

□ 추 진 실 적

◦ 용역 착수	: 2017. 5. 23.

◦ 용역 중간보고	: 2017. 11.

◦ 행정절차 이행	: 2018. 6. ~ 9.

▸관련 기관(부서) 협의 및  주민공청회

▸시의회 의견 청취

▸경관위원회 심의

▸공공디자인위원회 심의

◦ 용역 최종보고	: 2018. 9. 7.

◦ 용역 준공	: 2018. 9. 11.

6		송학동 학곤선(대로3-7호) 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 송학동지안리즈아파트 ~ 한국타이어 티스테이션

◦ 사업규모 : 도시계획도로 개설 L=750m , B=8→25m(대로3류7호)

▸ 우수관 암거BOX(2.5*2) L=373m, D450~D800 L=361m

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사 업 비 : 2,700백만원

□ 추 진 실 적

◦ 실시계획인가고시	: 2007. 3. 2.

◦ 편입 토지보상	: 2004. 3. ~ 2009. 12.

◦ 시 투･융자심사(적정)	: 2017. 11. 2.

◦ 실시설계용역	: 2018. 2. ~ 2018. 7.

◦ 공사 착공	: 2018. 10.

□ 마무리 대책

◦ 도로개설 공사 추진	: 2018. 11. ~ 2019. 12.

7		함열 미력리(소로1류8호) 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열읍 와리 809번지 일원

◦ 사업규모 : L=462m , B=10m(소로1류8호)

◦ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용 : 도시계획도로개설

◦ 총사업비 : 2,000백만원(공사비 1,355․보상비 645)

▸2018년 예산 : 695백만원 (본예산 398․명시 138․사고159)

※ 연도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구분	총 계	~2017년	2018년	2019년~
총계	2,000	1,305	695	0
도비	440	440
시비	1,560	865	695

□ 추 진 실 적

◦ 도시계획시설 실시계획인가 고시	: 2010. 3.

◦ 편입용지 보상 완료	: 2017. 12

◦ 실시설계용역 완료	: 2015. 5.

◦ 1차분 공사 준공(L=230m)	: 2018. 5.

◦ 2차분 공사 착공(L=232m)	: 2018. 3.

□ 마무리 대책

◦ 2차분 공사 준공(L=232m)	: 2018. 11.

8		자전거 이용 활성화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 익산시 자전거이용 활성화 계획 수립 용역

▸용역기간 : 2017. 7. 20. ~ 2018. 3. 5.

▸용 역 비 : 60백만원

▸주요내용 : 자전거이용 시설 간 연계 및 타 수단 교통로와의 연계  방안 도출 등

◦ 녹색 교통 만들기 사업

▸사업기간 : 매년 3월~6월, 8월~11월  2회/년

▸위    치 : 모현동 자전거 보관소(구. 이리농악전수관)

▸주요내용 : 방치․폐자전거 수거 및 수리, 저소득층 기증

- 민생경제과 지역공동체 일자리 사업 인력 활용(4명)

◦ 웅포 곰개나루 자전거 대여소 운영

▸운영기간 : 매년 4월~6월, 9월~11월(주말 및 공휴일 운영)

▸위    치 : 웅포 곰개나루 관광지 내 자전거 대여소

▸주요내용 : 자전거 무료대여(50대 운영)

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 자전거이용 활성화 계획 수립 용역 완료	: 2018. 3.

▸5개년 사업계획 설정(27개노선 29Km, 2,350백만원)

- 익산시 자전거 이용 활성화 계획(전체 116개노선 L=178Km)

▸탑천 자전거도로 정비공사 일부 완료(전체 6Km 중 2.5Km)

- 자전거 우선도로 고시	: 2018. 6. 20.

- 공사 추진	: 2018. 8. ~ 9.

◦ 녹색 교통 만들기 사업(2018. 10. 15. 기준)

▸방치･폐자전거 및 기증 자전거 수거 : 333대

▸재생자전거 생산 : 140대

- 읍면동 업무용자전거 19대, 웅포 자전거 대여소 33대, 모현동 보관소 88대

◦ 웅포 곰개나루 자전거 대여소 운영(2018. 10. 15. 기준)

▸무료 자전거 대여 : 4,005대(누적 대여횟수)

□ 마무리 대책

◦ 자전거 이용 활성화 사업

▸ 자전거 도로 정비공사	: 2018. 11. ~ 12.

- 원광대~고속터미널외 5개소(L=3.8Km)

◦ 녹색 교통 만들기 사업

▸ 방치･폐자전거 수거 및 재생 자전거 생산	: 2018. 11.

- 재생자전거 기증(저소득층 등)

◦ 웅포 곰개나루 대여소 운영	: 2018. 11.

9		전국체전 대비 주요 간선도로변 벽화 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 주요 간선도로 환경정비 담장 및 옹벽 13개소

▸이리북초등학교 담장, 구이리남중학교 옹벽, 국민생활관 앞 가설담장, 영등제일4차 주변 옹벽, 미륵사지로 일원 담장 등

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 10.

◦ 사 업 비 : 332백만원

◦ 사업내용 : 담장 벽화 및 옹벽 타일벽화 제작･시공 등

□ 추 진 실 적

◦ 시민참여 벽화봉사 시행	: 2018. 5. ~ 6.

▸자원봉사구간 3개소

- 이리공고 후문 옆 옹벽, 김동문체육관 앞 주택외벽, 황등로 일원

◦ 잔여구간(10개소) 사업 시행	: 2018. 7. ~ 10.

▸페인트 도색 3개소

- 구 이리남중학교 옹벽, 국민생활관 앞 가설담장, 금마정미소 옆 가설담장

▸페인트 벽화 3개소

- 금마정미소 앞 주택담장, 금마 신기마을 주택 외벽 및 담장

▸타일 벽화 5개소

- 이리북초등학교 담장, 영등제일4차 주변옹벽, 모현초등학교 후문 옆 옹벽,

북부청사 정문옆 옹벽, 대동남앞 담장