건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 주요성과
□	2018 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충 환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공 장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여 도로확포장으로지역간소통원활및통행불편해소 생태하천정비로생활환경개선및주민편익도모 조명시설설치로보행환경개선및야간통행불편해소

일  반  현  황

□ 기       구

					건 설 과
건설행정				도로시설			하천시설					하천관리					가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	22		1	5	11	3	2
현 원	22		1	8	8	1	4
증 감	0			3	△3	△2	2

□ 사 무 분 장

◦ 건설행정 : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상 및 소송업무

◦ 도로시설 : 철도건널목 개량사업, 고속국도

, 국도, 지방도 등 사업관련 협의  시·군도, 농어촌도로 확·포장사업 추진

◦ 하천시설 : 하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦ 하천관리 : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과,

생태하천관리

◦가로등관리 : 가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	153.779	169.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	27.169	75.034	27%

□ 하 천 점 용 허 가  현황(2018년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	농작물 경 작	공공목적 (관로매설등)	기 타 (대지·진입로등)	계	농작물 경 작	공공목적 (관로매설등)	기 타 (대지·진입로등)
612	475	74	63	317,783	246,918	55,373	15,492

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
28,210등	18,967등	9,243등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2018 예산집행실적

【 2018. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				39,468,084	14,211,766	25,256,318	36.0
	도로시설관리			23,452,513	10,735,858	12,716,655	45.7
		시·군도농어촌도로확·포장		13,541,777	2,341,696	11,200,081	17.3
			용동 삼정-두무간 도로확·포장	1,182,357	496,957	685,400	42.0	명시, 사고
			망성신성~관산간도로확·포장	492,856	24,843	468,013	5.0	명시
			오산장신~만석간도로확·포장	700,000	194,668	505,332	27.8	명시
			왕궁온수~시대간 (황암~상발)도로확포장공사	320,000	2,310	317,690	0.7
			춘포토다리-덕동간도로확포장공사	300,000	26,919	273,081	9.0
			미불용지매입비 (시군농어촌도로)	232,352	32,823	199,539	14.1	명시
			용안창리법성간 도로확·포장	730,000	61,860	668,140	8.5	명시
			함라칠성~다은간도로확포장공사	500,000	36,223	463,777	7.2
			망성군도10호금지간도로확포장공사	500,000	39,723	460,277	7.9
			금마누동~신촌간도로확포장공사	392,772	33,865	358,907	8.6
			시군농어촌도로확포장사업추진	7,000	4,260	2,740	60.9
			군도23호선도로·확포장공사	6,185,746	1,004,837	5,180,909	16.2	명시
			오산외용(외검산)도로확포장공사	368,694	193,267	175,427	52.4	명시
			용동흥암마을진입로확포장공사	370,000	25,276	344,724	6.8
			군도8호선잔여(병목)구간도로확포장공사	110,000	101,185	8,815	92.0
			어양동어곳~부평간도로확포장공사	450,000	62,680	387,320	13.9

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			오산면소재지진입도로 (군도2호)확포장공사	100,000	0	100,000	0
			오산제일교회-정각사간도로(리도203호)확포장공사	200,000	0	200,000	0
			황등도선-외화간 (면도104호)확포장공사	100,000	0	100,000	0
			하나로-소간촌간도로 (리도203호)확포장공사	100,000	0	100,000	0
			왕궁양동마을진입도로 (리도207호)확포장공사	100,000	0	100,000	0
			금마신정-증왕간도로 (리도202호)확포장공사	100,000	0	100,000	0
		주민숙원사업		38,960	29,222	9,738	75.0
			국내여비	37,960	28,471	9,489	75.0
			시책추진업무추진비	1,000	751	249	75.1
		철도건널목개량사업		5,700,494	5,011,940	688,554	87.9
			평화육교 재가설	5,457,345	4,770,185	687,160	87.4	사고
			국도23호 오산교차로 램프설치	243,149	241,755	1,394	99.4
		교통관리개선사업		350,000	350,000	0	100
			낭산석천삼거리도로구조개선	350,000	350,000	0	100	명시
		도로조명시설관리		3,821,282	3,003,000	818,282	78.6
			보안등신규설치	377,000	222,226	154,774	58.9
			노후가로등정비	1,113,405	838,165	275,240	75.3	명시
			가로등,보안등 유지관리	2,275,202	1,897,539	377,663	83.4
			가로등보수차량 운영유지비	18,675	9,430	9,245	50.5
			주민편익증진사업(가로등.보안등설치)보조	37,000	35,640	1,360	96.3	명시

부서	정책	단위		세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
	하천정비				15,916,833	3,424,184	12,492,652	21.5
		하천정비 및 유지관리			15,916,833	3,424,184	12,492,652	21.5
			하천제방유지보수		1,213,294	727,363	485,931	59.9	명시
			하천제방유지보수(자체)		752,624	280,564	472,060	37.3	명시
			소하천정비(생활)		3,189,663	476,337	2,713,326	14.9	명시
			국가하천유지관리(4대강)		807,881	585,013	222,868	72.4	명시, 사고
			지방하천정비 (왕궁천,동명천)		7,498,408	1,127,306	6,371,102	15.0	명시, 계속비
			만경강물문화관진입도로개설공사		1,300,000	0	1,300,000	0	명시
			지방하천정비		40,000	0	40,000	0	명시
			국가하천유지보수 (4대강외)		294,963	98,737	196,226	33.5	명시
			하천관리및유지관리 (해지천)		500,000	9,876	490,124	2.0	명시
			소하천정비(동산천)		320,000	118,985	201,015	37.2
	재무활동(건설과)				21,696	593	21,103	2.7
			국고보조반환금		21,696	593	21,103	2.7
	행정운영경비				77,042	51,131	25,911	66.3
			인력운영비		40,000	26,248	13,752	65.6
			기본경비		37,042	24,883	12,159	67.2

2018 주요성과

□ 성      과

◦ 농어촌도로 확포장 및 교통관리 개선사업으로 차량통행 불편해소와

기계화 영농기반 구축으로 주민  편익 증대

‣낭산 석천삼거리 도로구조개선 회전교차로 설치공사

- 회전교차로 설치 1개소

- 공사 완료(2018. 06. 11)

‣용동 삼정~두무간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.21㎞, B=7.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 75%

‣군도 8호선 병목구간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.09㎞, B=8.0m

- 공사완료(2018. 06. 25.)

‣군도 23호선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=3.50㎞, B=16.5-20.5m (2차로→4차로)

- 도로확포장 공사 착공 : 2018. 05. 28.

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 2.6%

‣오산 외검선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.8㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 60%

‣오산 장신~만석간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.8㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 60%

◦ 평화육교를 재가설하여 호남선 KTX 완전개통과 안전한 교통망 구축

‣대체우회도로 설치(L=1.1㎞, 4차로), 평화육교 철거

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천정비로

재해  예방 및 시민 친수 공간 조성

‣대판천 소하천정비사업 공사 추진(18. 5.14. 착공) : 공정률 52%

◦ 노후 가로등정비 및 보안등 신규설치로 야간통행 불편해소

‣노후가로등 정비 및 유지보수	: 9개사업 완료

‣보안등 신규설치 및 이설	: 10개사업(272개소)

2018 주요업무결산

		공익사업을 위한 용지보상 군도23호선 도로확·포장 평화육교 재가설 시·군도 및 농어촌도로 확·포장 왕궁천 하천환경 정비사업 동면천 하천환경 정비사업 소하천 정비사업(대판천·동산천) 만경강 문화관 조성사업 도로조명 조도개선

1		공익사업을 위한 용지보상

□ 사 업 개 요

◦ 현     황                                    (10월15일 현재)

구분	보상대상			보상실적				미보상 용지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	59	3,285	837,375	59	2,028	551,323	66%	59	1,257	286,052
도시재생과	30	621	101,515	30	403	59,193	59%	30	218	42,322
건 설 과	23	2,050	524,426	23	1,070	289,869	56%	23	980	234,557
도로공원과	2	46	9,121	2	31	7,319	80%	2	15	1,802
시민안전과	3	62	9,397	3	47	6,736	72%	3	15	2,661
타 기 관	1	506	192,916	1	477	188,206	98%	1	29	4,710

□ 추 진 실 적

◦ 보상계획 : 59개노선 3,285필지 837,375㎡

◦ 보상실적 : 59개노선 2,028필지 551,323㎡

□ 마무리 대책

◦ 보상계획 : 59개노선 1,257필지  286,052㎡

▸독려반 2개반 4명 편성 운영하여 적극적인 보상업무 추진

▸협의기간 내 미협의자 개별방문 및 면담으로 집중 독려

▸해당 사업자별 현지(읍․면․동) 출장 보상협의 및 계약체결

▸소액보상자, 노약자, 장애인 등 현지방문 보상민원 처리

▸원거리거주자(서울, 경기 등)왕복 우편이용 보상협의계약 대행처리

2		군도 23호선 도로 확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=20m(2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 125억원(공사비 90, 보상비 31, 기타 4)

□ 추 진 실 적

◦ 토지 및 지장물 손실보상	: 2016. 6. ~ 현재

▸총 248필지 51,900㎡ 중 152필지 35,860㎡ 협의매수(69%)

◦ 공사 발주	: 2018. 4. 10.

◦ 공사 착공	: 2018. 5. 28.

▸도급액 3,949백만원

◦ 1차분 공사 추진(토공)	: 2018. 5. 28. ~ 현재

▸공사 공정율 2.6%

□ 마무리 대책

◦ 1차분 공사 추진	: 2018. 11. ~ 12.

▸토공, 배수공

◦ 잔여토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 11. ~ 12.

▸대상 : 96필지, 16,040㎡

3		평화육교 재가설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2020. 6.

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m(4차로 ⇒ 6차로)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 익산시 190)

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

□ 추 진 실 적

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2018. 1. ~ 현재

▸대체우회도로 설치(4차로)	: 2018. 4. ~ 7.

▸평화육교 철거(전면통제 2018.7~2019.12)	: 2018. 7. ~ 9.

※ 전체 공정율 15.6%

◦ 편입 토지 및 지장물 협의매수	: 2018. 1. ~ 현재

□ 마무리 대책

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2018. 11. ~ 12.

▸연약지반처리, 대간선수로 이설

◦ 미매입토지 협의매수 및 수용재결	: 2018. 11. ~ 12.

4		시·군도 및 농어촌도로 확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 오산, 용동, 망성, 금마, 왕궁, 삼기, 용안, 함라, 춘포,

낭산, 황등, 어양동, 부송동 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2021.

◦ 사업규모 : L= 18.886km, B= 6.0 ~ 20.0m

◦ 총사업비 : 35,576백만원(21개사업, 본예산 3,880, 이월예산 2,330, 추경 1,500)

▸망성 신성~관산간 도로확·포장공사	: 493백만원

- L=1.156km, B=7.0m	(본 300, 명 193)

▸용안 창리~법성간 도로확·포장공사	: 730백만원

- L=0.84km, B=8.0m	(본 530, 명 200)

▸국도23호 오산교차로 진입램프 설치공사	: 243백만원

- L=0.29km, B=8.0m	(명 243)

▸용동 삼정~두무간 도로확·포장공사	: 1,182백만원

- L=1.21km, B=7.0m	(명 905, 사 277)

▸오산 외용(외검선) 도로확·포장공사	: 369백만원

- L=0.80km, B=8.0m	(본 300, 명 69)

▸함라 칠성~다은간 도로확.포장공사	: 500백만원

- L=1.00km, B=8.0m	(본 500)

▸망성 군도10호~금지간 도로확·포장공사	: 500백만원

- L=1.20km, B=8.0m	(본 500)

▸용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사	: 370백만원

- L=0.30km, B=6.0m	(본 370)

▸낭산 석천삼거리 도로구조개선사업	: 350백만원

- 3지 회전교차로 1개소	(명 150, 1회추경 200)

▸오산 장신~만석간 도로확·포장공사	: 700백만원

- L=1.61km, B=8.0m                      (본 500 명 200)

▸금마 누동~신촌간 도로확·포장공사	: 393백만원

- L=0.93km, B=7.0m                      (명 93 1회추경 300)

▸왕궁 온수~시대간 도로확·포장공사	: 320백만원

- L=3.00km, B=8.0m                      (본 320)

▸춘포 토다리~덕동간 도로확·포장공사	: 300백만원

- L=1.00km, B=8.0m                      (본 300)

▸어양동 어곳~부평간 도로확·포장공사	: 450백만원

- L=0.80km, B=8.0m                      (본 150 1회추경 300)

▸군도8호선 잔여(병목)구간 확·포장공사	: 110백만원

- L=0.10km, B=8.0m                      (본 110)

▸금마 신정~중왕간 도로확·포장공사	: 100백만원

- L=1.20km, B=8.0m                      (1회추경 100)

▸황등 도선~외화간 도로확·포장공사	: 100백만원

- L=0.70km, B=8.0m                      (1회추경 100)

▸오산 제일교회~정각사간 도로확·포장공사	: 200백만원

- L=0.40km, B=8.0m                       (1회추경 200)

▸왕궁 양동마을 진입도로 확·포장공사	: 100백만원

- L=0.60km, B=8.0m                       (1회추경 100)

▸하나로~소간촌간 도로확·포장공사	: 100백만원

- L=1.00km, B=8.0m                      (1회추경 100)

▸ 오산면 소재지 진입도로 확·포장공사	: 100백만원

- L=0.95km, B=17.0m                     (1회추경 100)

□ 추 진 실 적

◦ 망성 신성~관산간 도로 확·포장공사

▸실시설계 용역 추진	: 2018. 5. ~  6.

▸공사 착공	: 2018. 9. 28.

◦ 용안 창리~법성간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역	: 2017. 7. ~ 2018. 2.

▸행정절차 이행	및 감정평가	: 2018. 3. ~ 현재

◦ 국도23호 오산교차로 진입램프 설치공사

▸공사 추진	: 2018. 3. ~ 2018. 6.

▸공사 준공	: 2018. 9. 3.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸2, 3차분 공사 추진(배수공, 구조물공 등)	: 2018. 5. ~ 현재

◦ 오산 외용(외검선) 도로 확·포장공사

▸공사 착공	: 2018. 3. 12.

▸공사 추진	: 2018. 3. ~ 현재

◦ 함라 칠성~다은간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018. 1. ~ 6.

▸공사 발주	: 2018. 9. 5.

◦ 망성 군도10호~금지간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018. 1. ~ 6.

▸공사 발주	: 2018.  9.  5.

◦ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사

▸실시설계 용역 추진	: 2018. 1. ~ 3.

▸공사 발주	: 2018. 9. 28.

◦ 낭산 석천삼거리 도로 구조개선사업

▸공사 완료	: 2018. 6. 11.

◦ 오산 장신~만석간 도로 확·포장공사

▸행정절차 이행 및 손실보상	: 2018. 2. ~ 현재

▸공사 추진	: 2018. 4. ~ 현재

◦ 금마 누동~신촌간 도로 확·포장공사

▸환경영향평가 및 문화재 지표조사 용역	: 2018. 1. ~ 4.

▸행정절차 이행	: 2018. 4. ~ 5.

▸공사 발주	: 2018. 9. 5.

◦ 왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 1. ~ 현재

◦ 춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018. 1. ~ 6.

▸행정절차 이행 및 보상계획 열람공고	: 2018. 6. ~ 현재

◦ 어양동 어곳~부평간 도로 확·포장공사

▸설계용역 추진	: 2018. 1. ~ 6.

▸행정절차 이행 및 보상계획 열람공고	: 2018. 6. ~ 현재

◦ 군도8호선 잔여(병목)구간 확·포장공사

▸공사 완료	: 2018. 6. 25.

◦ 금마 신정~중왕간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 발주	: 2018. 9. 4.

▸실시설계용역 착수	: 2018. 10. 2.

◦ 황등 도선~외화간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 발주	: 2018. 8. 20.

▸실시설계용역 착수	: 2018. 8. 31.

◦ 오산 제일교회~정각사간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 발주	: 2018. 8. 9.

▸실시설계용역 착수	: 2018. 8. 22.

◦ 왕궁 양동마을 진입도로 확·포장공사

▸실시설계용역 발주	: 2018. 8. 9.

▸실시설계용역 착수	: 2018. 8. 29.

◦ 하나로~소간촌간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 발주	: 2018. 8. 8.

▸실시설계용역 착수	: 2018. 8. 29.

◦ 오산면 소재지 진입도로 확·포장공사

▸실시설계용역 발주	: 2018. 8. 8.

▸실시설계용역 착수	: 2018. 8. 30.

□ 마무리 대책

◦ 망성 신성~관산간 도로 확·포장공사

▸공사 추진	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 용안 창리~법성간 도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸2, 3차분 공사 추진(구조물공, 포장공)	: 2018. 11. ~ 12.

▸공사 준공	: 2018. 12..

◦ 오산 외용(외검선) 도로 확·포장공사

▸공사 추진	: 2018. 11. ~ 12.

▸공사 준공	: 2018. 12.

◦ 함라 칠성~다은간 도로 확·포장공사

▸미매입 토지 협의매수	: 2018. 11. ~ 12.

▸공사 추진(1차분)	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 망성 군도10호~금지간 도로 확·포장공사

▸미매입 토지 협의매수	: 2018. 11. ~ 12.

▸공사 추진(1차분)	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사

▸용지 보상	: 2018. 11. ~ 12.

▸공사 추진	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 오산 장신~만석간 도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 11. ~ 12.

▸공사 준공	: 2018. 12.

◦ 금마 누동~신촌간 도로 확·포장공사

▸미매입 토지 협의매수	: 2018. 11. ~ 12.

▸공사 추진(1차분)	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 어양동 어곳~부평간 도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 금마 신정~중왕간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 황등 도선~외화간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 오산 제일교회~정각사간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 왕궁 양동마을 진입도로 확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 하나로~소간촌간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 오산면 소재지 진입도로 확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018. 11. ~ 12.

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2018년 예산액	금후 투자
	29개사업	L=29.61km B=5-8m	42,658	7,095	5,380	29,380
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	506	300	559	공사발주	망성 303 (신선선)
2	국도23호 오산교차로 진입램프설치공사	L=0.29km B=5.0m	333	333			준공
3	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	1,847			공정율 75%	용동 204 (삼두선)
4	용동 흥왕마을 진입로 도로확.포장	L=0.3km B=6.0m	370		370		착공	용동 209 (흥왕선)
5	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	505	300	606	착공	금마 102 (누부선)
6	오산 외용(외검)선 도로확.포장	L=0.80km B=8.0m	1,000	217	300	483	공사중	오산 201 (외검선)
7	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
8	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
9	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	974	474	500		공사중	오산 301 (용연선)	군도 1호
10	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
11	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190	500	285	공사발주	함라 201 (진다선)
12	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180	500	1,192	공사발주	군도 10호
13	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
16	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2018년 예산액	금후 투자
17	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296	320	2,187	용지 57%	군도 21호
18	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127	300	1,793	용지 9%	춘포 103 (신화선)
19	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	230	530	86	설계완료	용안 203 (자석선)
20	삼기 석라선 도로.확포장	L=1.00km B=8.0m	1,400			1,400		삼기 203 (석라선)
21	낭산 석천삼거리 도로구조개선	회전교차로 1개소	350	150	200		준공	군도 13호	지방도 724호
22	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m	1,900		450	1,450	설계완료	시도 1268
23	군도8호선 병목구간 도로확.포장	L=0.1km B=8.0m	110		110		준공	군도 8호
24	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,500	0	100	1,400	설계중	금마 202 (서오선)
25	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,000	0	100	900	설계중	황등 104 (황팔선)
26	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	700	0	200	500	설계중	오산 203 (신수선)
27	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m	700	0	100	600	설계중	왕궁 207 (양곡선)
28	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,400	0	100	1,300	설계중	삼기 203 (석라선)
29	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=17.0m	1,900	0	100	1,800	설계중	군도2호

5		왕궁천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리~춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 :  2015. ~ 2019.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25km

◦ 총사업비 : 24,720백만원(국비 12,360, 도비 4,944, 시비 7,416)

▸2018년 예산 확보액 – 4,194백만원

◦ 사업내용 : 하천정비 L=9.25km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 추 진 실 적

◦ 건설기술심의(전북도)	: 2018. 3. 16.

◦ 경관심의/공공디자인심의	: 2018. 4. 30.

◦ 계약심의위원회 심의	: 2018. 7. 20.

◦ 총사업비 조정(247 → 474억, 증227) 요청(익산청)	: 2018. 8. 22.

□ 마무리 대책

◦ 총사업비 조정 승인(익산청)	: 2018. 11.

◦ 하천공사 시행계획 고시	: 2018. 11.

◦ 공사 발주	: 2018. 11.

6		동면천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리~왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 :  2017. ~ 2020.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05km

◦ 총사업비 : 15,480백만원(국비 7,740, 도비 3,096, 시비 4,644)

▸2018년 예산 확보액 – 1,000백만원

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 추 진 실 적

◦ 주민설명회(1차)	: 2018. 4. 10.

◦ 실시설계 협의(1차, 익산청)	: 2018. 7. 20.

▸동면천 하천기본계획 변경(익산청)에 따른 협의 의견 반영

◦ 주민설명회(2차)	: 2018. 10. 4.

□ 마무리 대책

◦ 설계경계성 검토(VE)	: 2018. 12.

◦ 설계적정성 검토(조달청)	: 2019.  1.

◦ 실시설계 협의(2차, 익산청)	: 2019.  3.

◦ 토지분할 및 보상 추진	: 2019.  4.

7		소하천정비사업(대판천, 동산천)

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
대판천 소하천정비사업	삼기면 연동리 일원	2017. ~ 2019.	3,057(국 1,528 시 1,529) ▸2018년 : 1,240	소하천정비 L=1.253km
동산천 소하천정비사업	웅포면 맹산리 일원	2018. ~ 2020.	2,700 (국 1,350 시 1,350) ▸2018년 : 320	소하천정비 L=1.018km

□ 추 진 실 적

【대 판 천】

◦ 대판천 편입토지 보상 실시	: 2018. 3. ~ 현재

▸52필지 중 45필지 완료, 86.5%

◦ 대판천 공사 착수	: 2018  5. 14.

▸공정률 52%(교량공, 배수공, 호안공 추진중)

【동 산 천】

◦ 주민설명회	: 2018. 4. 19.

◦ 공공디자인 심의(익산시)	: 2018. 9. 18.

□ 마무리 대책

◦ 동산천 사전설계검토(전북도) 및 보상계획 공고	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 대판천 공사 완료	: 2019. 6.

8		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

◦ 사업기간 : 2015. 09. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 11,300백만원(국비 10,000, 시비 1,300)

◦ 사업내용

▸규    모 : 11,555㎡(지하 1층 지상2층)/연면적 1,686㎡)

▸주요시설 : 다목적실, 로비, 사무실 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청 하천계획과

□ 추 진 실 적

◦ 물문화관 건립 TF팀 구성(익산시, 김제시, 익산지방국토관리청)	: 2018. 2. 14.

▸차별화된 전시 콘셉트 및 스토리를 가진 전시물 설계 및 제작설치

◦ 만경강 문화관 건립 TF팀 1차 회의	: 2018. 2. 19.

▸익산시 2명, 김제시 2명, 익산지방국토관리청 4명

◦ 만경강 문화관 건립 TF팀 2차 회의	: 2018. 3. 5.

◦ 도시관리계획결정(변경) 요청(건설과→도시재생과)	: 2018. 4. 16.

◦ 도시관리계획결정(변경) 입안권자 협의 회신(김제시)	: 2018. 6. 26.

◦ 도시관리계획결정(변경안) 관련부서 협의 요청	: 2018. 8. 9.

◦ 도시관리계획결정(변경안) 관련부서 협의의견 제출	: 2018. 8. 31.

□ 마무리 대책

◦ 도시관리계획결정(변경) 등 행정절차 완료	: 2018. 11.

◦ 감정평가 및 용지보상 실시(익산시)	: 2018. 11.~

◦ 공사발주 및 추진(익산지방국토관리청)	: 2019. 1. ~ 2020. 12.

9		도로조명 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업대상 : 생활환경개선보안등 설치 외 9개사업

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

◦ 사업예산 : 1,132백만원

◦ 사업내용 : 야간통행불편지역 도로조명설치 및 보수, 노후가로등

LED교체, 노후가로등정비 및 조도조절기 설치 등

▸주요사업 세부내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		8개 사업	1,131,640
보 안 등 신규설치	생활환경개선보안등설치	보안등신규설치 105개소	114,000
	함열읍 다송리외 보안등설치	보안등신규설치 155개소	166,000
	오산면외26개읍면동보안등설치	보안등신규설치70개소	95,000	2차추경
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비 90개소	90,000
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 50개소	50,000
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	101,805
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	35,100
	전기안전점검부적합보수단가	점검부적합보수 300개소	30,000
	도시지역 노후가로등LED교체공사	노후가로등LED교체	502,000
	가로등디밍(조도조절)시스템설치공사	가로등디밍조도조절설치	200,000

□ 추 진 실 적

◦ 노후가로등 정비 및 유지보수 9개사업(838백만원)	: 2018. 1. ~ 9.

◦ 보안등 신규설치 및 이설 272개소(257백만원)	: 2018. 1. ~ 9.

□ 마무리 대책

◦ 노후가로등 정비 및 유지보수 3개사업 추진	: 2018. 11. ~ 12.

◦ 오산면외 26개 읍면동 보안등설치 공사추진	: 2018. 11. ~ 12.