2018. 10.

제213회 익산시의회(임시회)

2018 주요업무 결산보고

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 주 요 성 과
□	2018 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기      구

											상수도과
상수행정				정수생산						급수시설					요 금				누수방지						수질실험

□ 정 ․ 현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	42	1	1	9	15	10	4	2
현 원	42	1	1	11	23	2	2	2
증 감				2	8	△8	△2

□ 사 무 분 장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관 개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 5, 여 5

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	295,203	292,987	99.2
도심권	233,277	233,043	99.9
읍면권	61,926	59,944	96.8

□ 상수도 급수시설

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
계		230,300	154,169
생 활 용 수	소 계	195,300	132,890	100%
	광 역	105,300	61,658	46.4%
	자 체	90,000	71,232	53.6%
공 업 용 수	자 체	35,000	21,279

□ 업종별 상수도 사용 명세

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	62,475	3,341,546	100
가 정 용	47,948	1,645,692	49.2
일 반 용	13,752	604,531	18.1
대중탕용	42	19,586	0.6
산 업 용	640	385,204	11.5
전용공업용	93	686,533	20.6

□ 상수도 관로

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,885.8	2.5	25.3	1,170.5	687.5

□ 상수도 시설

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	6	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2018 예산집행실적

【 2018. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				33,411,445	24,107,519	9,303,926	72
	상수도사업비용			25,626,277	17,641,824	7,984,453	69
		영업비용		25,304,550	17,641,824	7,662,726	70
			원수 및 취수비	13,611,235	9,756,676	3,854,559	71
			정수비	2,742,174	1,885,686	856,488	69
			배·급수비	169,717	100,746	68,971	59
			급·배수공사비	1,563,701	879,744	683,957	56
			일반관리비	4,869,431	3,397,002	1,472,429	70
			징수 및 수용가관리비	2,348,292	1,621,970	726,322	69
		예비비		321,727	0	321,727	0
	자본적지출			7,785,168	6,465,695	1,319,473	83
		유형자산취득		7,375,250	6,465,695	909,555	88
			구축물	6,887,713	6,259,383	628,330	90
			기계장치	448,118	180,061	268,057	40
			공기구비품	39,419	26,251	13,168	67
		예비비		409,918	0	409,918	0
			예비비	409,918	0	409,918	0

2018 주요성과

□ 성      과

◦ 유수율제고사업 추진 경영개선 기반 조성

▸ 상수도 노후관 교체 / 소규모 누수처 복구 : 8개소 3.4㎞/574개소

▸ 관내 변류정비 및 교체 117개소

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

▸ 급수구역 확장공사 추진(가압장) : 3개소

▸ 급ㆍ배수관 개선공사 추진 : 218개소 6.9km

◦ 정수장 시설개선 및 보수‧보강 등을 통한 효율적 관리

▸ 정수시설물 개선 및 보수‧보강 공사 추진 : 38개 사업(356백만원)

▸ 국가안전대진단에 따른 자체 안전점검 실시 : 3회 11개소

◦ 효율적 검침 및 부과․징수로 경영 효율화 제고

▸ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 검침원 교육 10회

▸ 대구경 월트망 계량기 전자식 수도미터기로 전환 : 22개소 22전

※ 대상 : 75mm이상 계량기 중 내용년수 6년 경과, 고장, 동파 계량기

◦ 삼기면 석불사거리~낭산사거리간 배수관부설공사 완료

▸ 위    치 : 익산시 삼기면, 낭산면 일원

▸ 공사개요 : 배수관부설 D400mm L=6,380m

▸ 공사기간 : 2018. 1. 15. ~ 2018. 7. 13.

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

▸ 급수장치 수선공사 : 1,776건

▸ 수용가 옥내누수탐사 : 1,047건

▸ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 46개소 13.2km

□ 미흡한 점

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

‣ 연도별 현실화율 현황(2016년 80.93%,  2017년 76.29%)

2018 주요업무 결산

		상수도관망 최적화 사업
		급수구역확장 및 급․배수관 민원공사
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급
		상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화
		수도정비기본계획 및 배수지확충 기본․실시설계 용역

1		상수도관망 최적화 사업

ᷮ 사 업 개 요

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
계			5,400
블록시스템구축	현영동, 부송동, 어양동 모현동, 신동, 송학동 등	14개소	3,200
노후관 교체	남중동, 마동, 중앙동 일원	4.3km	1,200
긴급 누수처 복구	관내 일원	800개소	800
변류 정비공사	〃	200개소	200

□ 추 진 실 적

◦ 노후관 교체 공사

▸ 상공회의소사거리~KCC석고보드 간 노후관 교체공사 등 8개소 완료

◦ 누수처 복구 : 함낭로 289 등 574개소 복구완료

◦ 변류정비 : 선화로1길 58-25등 117개소 불량 변류(제수변, 소화전 등) 교체

◦ 블록시스템 구축

▸ PB01블록시스템 구축공사 등 11개소 발주

□ 마무리 계획

◦ 노후관 교체 공사

▸ 코스모스슈퍼~진성종합공사 간 노후관 교체공사 등 2개소 완료    : 2018. 12.

◦ 블록시스템 구축

▸ PB10블록시스템 구축공사 등 3개소 발주                : 2018. 10.

▸ PB01블록시스템 구축공사 등 14개소 완료               : 2018. 12.

2		급수구역 확장 및 급·배수관 민원공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
계			2,204
급수구역 확장공사	함라면 수동마을	가압장신설 1개소	34
	여산면 금곡마을	가압장신설 1개소	46
	부송동 화물터미널뒤	가압장신설 1개소	43
	금마면 신정마을	배수관부설 L=1,200m	96
	여산부사관학교	가압장신설 1개소	30	1회추경
	왕궁면 연정마을	가압장신설 1개소	50	1회추경
	왕궁면 금광마을	가압장신설 1개소	40	1회추경
	남중동 기계공고옆	배수관부설 L=70m	10	1회추경
	송학동교차로~지하차도간	배수관부설 L=840m	84	1회추경
	동산동 옥야초교앞	배수관부설 L=980m	130	1회추경
부설도로 노면정비	익산시 일원	15km	741
급·배수관 민원공사	익산시 일원	8.0km	900

□ 추 진 실 적

◦ 가압장설치(함라면 수동, 여산면 금곡, 부송동 화물터미널뒤) 완료    : 2018. 4.

◦ 상수도부설도로 노면정비공사 완료(13.2km)                   : 2018. 10.

◦ 급ㆍ배수관민원공사 완료(6.9km)                            : 2018. 10.

□ 추진상 애로사항

◦ 금마면 신정마을 배수관부설공사구간 사유토지의 사용승락 거부

※ 흥일농장의 공사소음으로 인한 모돈의 유산위험성 주장하며 피해발생시

보상요청 민원제기 → 공사중지 : 2018. 4. 26.

□ 마무리 계획

◦ 급수구역 확장 및 상수도 부설도로 노면정비 공사 추진 : 2018. 10. ~ 12.

◦ 급ㆍ배수관 공사(수압저조로 인한 급수불출 민원 발생시) : 2018. 10. ~ 12.

3		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사 업 개 요

◦ 원수 및 정수의 수질관리를 위한 검사 강화

▸ 법정검사 기준 외 검사항목 및 횟수 추가시행

◦ 정수장 시설물 개‧보수 및 안전점검 관리강화 : 정수장 2개소, 배수지 6개소

▸ 정수시설 안전점검 및 배수지, 침전지 청소 실시

□ 추 진 실 적

◦ 상수원 수질에 따른 선택적 취수를 통해 목표 수질관리제 운영

▸ 원 수 : BOD 2mg/L이하 (수질등급 I 등급 기준)

▸ 정 수 : 탁도 0.15 NTU이하 (수질기준 0.5 NTU이하)

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정검사 기준	수질검사 강화
원 수	월 간 : pH 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 25개	일 일 : pH등 6개 주 간 : 대장균 등 7개 분 기 : 수은 등 31개
정 수	일 일 : pH 등 5개 주 간 : 대장균군 등 5개 월 간 : 질산성질소 등 59개	일2회 : pH 등 6개 주2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 82개

◦ 정수장 안전점검 및 시설물 보수‧보강을 통한 효율적 운영관리

▸ 정밀점검 및 내진성능평가 용역추진(기간 : 2018. 4. 26. ~ 2018. 11. 22.)

▸ 유해화학물질 장외영향평가 용역추진(기간 : 2018. 3. 19. ~ 2018. 12. 31.)

▸ 국가안전대진단에 따른 자체 안전점검 3회 실시

▸ 시설물 보수‧보강 등 38개사업/356백만원 완료

▸ 정‧배수지 및 침전지 청소, 수목정리 및 예취 각 2회 실시

□ 마무리 계획

◦ 수질검사 강화 및 검사 결과 홍보로 수돗물 신뢰도 제고

◦ 정수시설물 보수‧보강 및 환경정비 지속실시로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

4		상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화

□ 사 업 개 요

◦ 수전현황

(단위 : 전)

계	가정용	일반용	대중탕용	산업용	전용공업용
62,475	47,948	13,752	42	640	93

◦ 2018년 상수도요금 부과․징수 (‘18. 9. 30. 기준 )

▸ 2018년 요금 부과 및 징수 목표액  : 20,357백만원 / 20,153백만원 (99.0%)

◦ 체납액 현황

(‘18. 10. 15. 기준 )

계	현년도 부과분	과년도 부과분
419,856천원	174,607천원	245,249천원

□ 추진실적

◦ 정확한 요금 부과를 위한 수도계량기 조사원 교육 : 10회

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수반 편성운영(2개반)

▸ 전화, 방문 체납 독려 및 단수 조치

▸ 30만원 이상, 3회이상 체납자 압류예고문 발송

◦ 수도계량기 조사원(50명)담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

▸ 2회 체납 수용가 체납수도요금 납부안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

□ 마무리 계획

◦ 수도계량기 조사원 친절 및 직무교육 실시 : 월 1회 이상

◦ 징수율제고를 위한 체납징수 활동 강화

▸ 상습체납자에 대한 강력한 행정조치 : 토지 및 건물 등 재산압류 등

5		수도정비기본계획 및 배수지확충 기본․실시설계 용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역개요  : 금마배수지 V=10,000㎥ 확충 기본 및 실시설계 수행

(당초 V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

◦ 용역기간  : 2017. 5. 11. ~ 2018. 11. 1.(18개월)

◦ 용 역 비  : 658백만원(시비)

◦ 용역내용  : 기본․실시설계 1식

▸ 배수지(V=10,000㎥), 송수가압장, 송․배수관로 L=0.5km(D500mm)

▸ 행정절차 이행(도시계획시설결정, 교통성 검토, 사전재해영향성 검토 등)

□ 추 진 실 적

◦ 용역착수                                   : 2017. 5. 11.

◦ 착수보고                                   : 2017. 6. 13.

◦ 설계변경                                   : 2017. 9. 4.

◦ 환경부 사전협의 및 승인요청                 : 2018. 1. 17. ~ 3. 8.

◦ 금마배수지 확충공사 설계서 작성 및 검토    : 2018. 4. ~ 5.

◦ 수도정비기본계획(변경) 보완요청 통보 및 회신   : 2018. 6. 28. ~ 7. 11.

□ 마무리 계획

◦ 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인완료      : 2018. 10.

◦ 배수지확충 기본․실시설계 완료             : 2018. 10.

◦ 용역준공                                   : 2018. 11.