하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 예산집행실적
□	2018 주 요 성 과
□	2018 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전 정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지 조성

일  반  현  황

□ 기         구

							하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리				지하수			폐수처리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	31	1	9	5	7	9
현 원	31	1	9	12	4	5
증 감				7	▵3	▵4

□ 사 무 분 장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 오산 문화마을 하수관거 정비사업, 남부2·3, 북부2 하수관거 정비사업, 함열지구 분류식 관거 정비사업, 유천 생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 마을하수처리시설 운영 및 유지관리, 하수중계펌프장 운영 및 유지관리, CSOs 운영 및 유지관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과
◦	폐수처리 :	공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영관리, 산업단지 폐수 유입 승인, 배수설비 신고, 비용부담금 부과징수 등

□ 하수도 일반

구 분		단 위	2018. 9.	비 고
시설	총인구	천명	300
	하수인구	천명	269
	보급률	%	89.7
하수처리	1일평균하수발생량	톤	119,070
	1일평균하수처리량	톤	116,715
	하수처리율	%	98.0
하수도 사용	개소수	전	39,422
	톤당 평균요금	원	556.5	2017년 기준

□ 하수(폐수)처리시설

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	28	145,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
제3일반산업단지 공동폐수처리시설	1	5,500㎥/일	직영

2018 예산집행실적

【 2018. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	관	항	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
하수도과				70,051,737	38,422,558	31,629,179	54.8
	하수도영업비용			34,623,588	29,401,721	5,221,867	84.9
		영업비용		34,359,642	29,398,973	4,960,669	85.5
			관거비	15,509,973	14,101,622	1,408,351	90.9
			펌프장비	397,209	197,226	199,983	49.6
			처리장비	15,028,234	12,817,354	2,210,880	85.2
			일반관리비	3,424,226	2,282,771	1,141,455	66.6
		영업외비용		3,800	2,748	1,052	72.3
			차입금이자상환	3,800	2,748	1,052	72.3
		예비비		260,146	-	260,146	0
				260,146	-	260,146	0
			예비비
	자본적지출			35,428,149	9,020,837	26,407,312	25.4
		유형자산취득		31,528,000	7,102,710	24,425,290	22.5
			구축물	30,457,043	6,744,510	23,712,533	22.1
			기계장치	612,657	212,990	399,667	34.7
			공기구비품	8,300	8,248	52	99.3
			건설중인자산	450,000	136,962	313,038	30.4
		비가동설비자산취득		428,854	329,578	99,276	76.8
				428,854	329,578	99,276	76.8
			건설중인자산
		비유동부채상환		177,200	132,900	44,300	75.0
			정부차입금원금상환	177,200	132,900	44,300	75.0
		기타자본적지출		2,550,462	1,455,649	1,094,813	57.1
			정부보조금반환	2,550,462	1,455,649	1,094,813	57.1
		예비비		743,633	-	743,633	0
			예비비	743,633	-	743,633	0

2018 주요성과

□ 성     과

◦ 오·우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

‣ 오산 문화마을 하수관거 정비공사 완료 : 관거정비 5.4km, 배수설비 87가구

‣ 금마3처리분구 하수관거 정비공사 완료 : 관거정비 1.0km, 배수설비 37개소

‣ 황등1처리분구 하수관거 정비공사 추진 : 관거정비 0.6km, 배수설비 19개소

◦ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

‣ 총27개소(139,561㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

‣ 하수처리시설 기능보강 추진으로 처리효율 향상 및 수질오염 저감

- 여산처리장 용수공급펌프 교체공사 외 10건

◦ 하수찌꺼기 감량화 사업 추진을 위한 공법선정 완료

‣ 기술제안서 경제성 검토 및 심의위원회 심의를 통한 최적 공법 선정

‣ 공법선정에 따른 찌꺼기 발생량 감소 및 유지관리비 절감 기대

◦ 읍·면·동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 하수도 정비 : 50건 2.5km, 하수도기계준설 : 8건 2,240㎥

‣ 하수생활민원 처리를 위한 직원 비상근무조 편성운영 : 2,150건

- 맨홀 및 하수도 준설 669건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차 조정 등 1,481건 실시

◦ 지하수 보조관측망 설치에 따른 체계적인 수질관리 시스템 마련

‣ 오산면 장신리 외 4개소 설치·운영 개시(’18년 현재 9개소 운영중)

□ 미흡한 점

◦ 배수설비 설치 및 정화조 폐쇄에 따른 주민안내 미흡

‣ 분류식하수관거 공사 시행에 따른 배수설비 사전조사가 이루어 졌으나 가옥주 부재시 연락체계 미확립으로 배수설비 설치 시일 과다소요

2018 주요업무결산

		남부2·3, 북부2처리분구 하수관거 정비사업 오산문화마을 하수관거 정비사업 유천생태습지 유지관리 공공하수처리시설 운영관리 하수찌꺼기 감량화사업 소규모 하수도 관련 주민숙원사업

1		남부2․3, 북부2처리분구 하수관거 정비사업 (인화동, 주현동, 동산동, /신흥동, 영등1동, 신용동)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 30,136백만원(국비 21,095, 도비 904, 시비 8,137)

▸ 2018년 : 11,775백만원(국비 8,242, 도비 353, 시비 3,180)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=28.0km, 배수설비 3,200가구

ᷮ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	2017. 6. 19.

◦ 인화동 주민설명회 개최(2회)	2017. 11. 24, 2018. 2. 5.

◦ 동산동 주민설명회 개최(2회)	2017. 11. 28, 2018. 2. 5.

◦ 전북도 설계(안) 기술심의 및 보완	2018. 4. 17. ~ 5. 16.

◦ 환경부 재원협의	2018. 4. 17. ~ 5. 16.

※ 2018. 9월 현재 용역 공정율 : 100%

□ 마무리 계획

◦ 조달청 원가심사 등 행정절차 이행	2018. 10. ~ 11.

◦ 주민설명회 개최 (인화동, 동산동, 신동)	2018. 10월 중

◦ 실시설계용역 완료	2018. 10월 중

◦ 건설사업관리(전면책임감리)용역 발주	2018. 10월 중

◦ 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ)	2018. 10월 중

◦ 시설공사 발주 및 착공	2018. 11 ~ 12월 중

◦ 시설공사 완료	2020. 12월 중

◦ 하수도사용개시 및 국비정산 보고	2020. 12. ~ 2021. 3.

2		오산문화마을 하수관거 정비사업 (오산면 신지리 옥포1·2, 광지, 월포마을 일원)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 오산면 신지리 옥포1·2, 광지, 월포마을 일원

◦ 사 업 량 : 오수관로 5.4km, 배수설비 87가구

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2018.

◦ 사 업 비 : 4,372백만원(국비3,060, 도비131, 시비1,181)

□ 위  치  도

마을하수처리장

(기존)

옥포마을

광지마을

월포마을

ᷮ 추 진 실 적

◦ 환경부 및 한국환경공단 재원협의 완료	2016. 6. 28.

◦ 전라북도 원가심사 완료	2016. 7. 10.

◦ 시설공사 착공	2017. 9. 15.

◦ 시설공사 준공	2018. 7. 12.

ᷮ 마무리 계획

◦ 국비정산 보고	2018. 10. ~ 2018. 12.

3		유천생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 시설규모 : 생태습지 A=134,521㎡, 생태하천 0.9km

◦ 사업내용 : 수질관리, 수목 및 잔디관리, 시설물 보강공사 등

◦ 사업기간 : 연 중

◦ 사 업 비 : 250백만원

ᷮ 추 진 실 적

◦ 유천생태습지 조경 유지관리공사 발주	2018. 1.

◦ 유지관리공사 추진	2018. 1.  ~ 2018. 12.

◦ 생태하천복원사업 모니터링 용역 추진	2018. 2.  ~ 2018. 12.

◦ 주민편익시설 보강 공사시행	2018. 2.  ~ 2018. 5.

▸ 체험숲길 조성, 소공연장 기능보강, 파고라, 의자 등 편의시설 증설 등

ᷮ 마무리 계획

◦ 주민편익시설 추가 보강공사 시행	2018. 10. ~ 2018. 12.

▸ 조명등 설치 및 정비, 수목지지대 정비, 경관조명 설치 등

- 사 업 비  : 200백만원(시비)

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 사 업 개 요

◦ 공공하수처리시설 : 27개소

시설명	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	익산	북부	함열	금마	분뇨
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	90개소	100,000	30,000	6,000	1,100	150
운영방식	직 영		직영77 위탁13	위탁운영[(주)전북엔비텍BTO, 2008.~2028.]

◦ 직영 시설 관리인원 : 4명(전기운영2, 기계운영1, 열관리운영1)

◦ BTO위탁운영비 예산 : 135억원(도비 5.9억원 시비 129.1억원)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 유입·방류수 법정 수질 준수(6개항목)

▸ 익산 외 4개소(일1회), 소규모(50톤 이상 주1회, 50톤 미만 월1회)

▸ 소규모하수도시설 및 중계펌프장 운영 관리 : 주1~2회 수시점검

◦ 공공하수처리시설 법정 기술진단 실시 : 오산문화 외 2개소 31,680천원

◦ 공공하수처리시설 악취 기술진단 실시 : 북부하수 외 3개소 105,462천원

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 : 익산공공 외 4개소 3,520천원

◦ 하수처리시설 시설보수 및 개선공사 추진 : 18건 484,340천원

◦ 익산하수 TMS 방류유량계 교체공사 추진 : 1건 55,865천원

◦ 익산 외 3개소 수질검사 측정대행 용역(단가계약) 추진 : 1건 94,543천원

◦ 하수처리시설 슬러지 준설작업 및 청소 : 10회 14,436천원

◦ 공공하수처리시설 악취 보강작업 실시 : 소화조 상단 포집시설 설치

□ 마무리 계획

◦ BTO 위탁운영 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 완료 : 2018. 12.

5		하수찌꺼기 감량화사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 21,020백만원 (국비 70%, 지방비 30%)

◦ 사업내용 : 개량공사 1식, 증설공사 1식

▸ 개량공사 : 스팀방식 변경, 드럼스크린 교체, 탈취커버, 가스저장탱크 교체 등

▸ 증설공사 : 소화조(5,000㎥/일), 탈취시설, 기계식 농축시설, 가스 정제설비

□ 추 진 실 적

◦ ‘18년도 예산 : 1,429백만원(국비1,000 도비108 시비321)

◦ 기초 현장조사	2018. 1. ~ 4.

◦ 타 지자체 감량화시설 견학 (6개소)	2018. 3.

◦ 공법선정 기술제안서 제출 공고	2018. 4.

◦ 공법선정심의	2018. 6.

◦ 기술사용협약 체결	2018. 7.

◦ 설계의 경제성 등(VE) 검토 용역	2018. 9.

□ 마무리 계획

◦ 설계자문, 계약심사 등 행정절차 추진	2018. 10. ~ 12.

◦ 기본 및 실시설계 용역 준공	2019. 1.

6		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 비 : 2,548백만원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

◦ 사업내용

▸ 시민생활에 불편한 하수도 슬러지 준설, 하수관로 연장, 맨홀단차 등생활의 불편을 주는 민원에 대하여 주민숙원사업 처리

◦ 사업개요	62건 / 2,548백만원

▸ 소규모 주민 숙원 사업                     :  21건 / 2,212백만원

▸ 읍면동 견문보고 사업(현장행정)             :  41건 /   336백만원

□ 추 진 실 적

◦ 소규모 주민숙원사업

▸ 읍면동지역 하수도 시설 및 준설(16건) 완료       : 1,874백만원

◦ 읍면동 주민예산편성사업(38건) 완료                :   288백만원

□ 마무리 계획

◦ 소규모 주민숙원사업(5건) 추진                        :   338백만원

▸ 읍면동 하수도 시설공사 및 하수도 슬러지 준설 등

◦ 읍면동 주민예산편성사업(3건) 추진                  :   48백만원

▸ 왕궁면 후암마을 하수도 정비공사 외 2건