경영개발과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 주요성과
□	2019 주 요 업 무 계 획

목표 및 중점추진과제

	비 전
기업이 필요로 하는 최고･최적의 산업용지 제공 및 배후도시 건설

		전 략 목 표
◦ ◦	기업유치 촉진을 위한 정주 기반시설 조성 공영개발 특별회계의 효율적 운영으로 재정의 건실화 추진

		중 점 과 제
◦ ◦	익산 일반산업단지 진입도로 개설공사 익산 부송4지구 도시개발사업

일  반  현  황

□ 기        구

					경영개발과
경영행정						용지보상								경영개발

□ 정  ․  현   원

(정원/현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13		1	5	4	3
현 원	11		1	5	3	1	1
증 감	△2		-	-	△1	△2	1

□ 사  무  분  장

◦ 경영 행정 : 공영개발사업 기획 및 조정, 공영개발사업 계약업무,

공영개발사업특별회계 예산 및 자금운용

◦ 용지 보상 : 용지분양 계획수립 및 추진, 경영평가 분석, 용지매입 및 보상, 지적공부정리, 토지수용  및  공탁, 공유재산 관리

◦ 경영 개발 : 익산일반산업단지 진입도로 개설사업, 익산부송4지구 도시개발사업

2018 주요성과

□ 성    과

◦함열농공(LED집적화)단지 조성사업 추진

▸ 함열농공(LED집적화)단지 지정 및 실시계획 변경

▸ 토지 매입 및 보상

▸ 공사준공

◦3산업단지 지원시설용지 투자 적정규모로 분양면적 조정 및      용적율 변경

▸ 분양면적(400평⇒200평) 조정

∙37필지 → 55필지(18필지 증)

▸ 공동주택 용적율 상향(200%⇒250%) 및 최고층수 규제완화(4층⇒10층)

◦익산일반산업단지 분양계약 체결

▸ 산업단지 분양계약               :  18개업체(313,368㎡) 37,200백만원

∙제3산업단지 산업용지          :  12개업체(270,133㎡) 33,428백만원

∙제3산업단지 쥬얼리단지        :   1개업체(  6,914㎡)    856백만원

∙제4산업단지 산업용지          :   5개업체( 36,321㎡)   2,916백만원

2019주요업무계획

		익산일반산업단지 진입도로 개설공사 익산 부송4지구 도시개발사업

1		익산일반산업단지 진입도로 개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산제3일반산업단지 (낭산면) ~ 연무 IC (논산시 연무읍)

◦ 사업내용 : 도로신설 L = 11.86㎞ (4차로), 교량신설 19개소 (1,245m)

◦ 사업기간 : 2010. 2 ~ 2021. 12.

◦ 총사업비 : 1,629억원 (공사비 1,209억, 보상비 등 420억)

◦ 현재(2019년)까지 확보액 : 1,243억(국비 829억, 도비 27억, 시비387억)

◦ 현공정율 : 60%

□ 추 진 계 획

◦ 총사업비 조정 협의                      : 2019.  1 ~ 2019.  6.

▸총사업비 조정협의 : 195억(국비 50%  97억) 예산 협의

-  토취료 및 운반거리 --------------------------- 약 123억

-  현장여건 및 민원처리 ------------------------- 약  55억

(용성입체교차로, 증발마을 교량신설 등)

-  물가변동(ES)반영 ------------------------------ 약  12억

-  기타(보상비등) -------------------------------- 약   5억

◦ 7차분 착공                              : 2019.  3.

▸2019년 공사비 : 253억 확보(국비 20억, 시비 120억, 이월비 113억)

▸공사내용 : 토공(순성토 15만㎡), 배수공(10㎞), 교량(산북천, 신풍육교), 부체도로(3㎞)

◦ 7차분 준공                              : 2019. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 산업단지 입주기업의 물류ㆍ수송비용 절감으로 기업경쟁력 강화

◦ 수도권과 연결되는 진입도로 확보로 주요 가로망 교통체증 해소

2		익산 부송4지구 도시개발사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 부송동 일원 (신재생자원센터 주변)

◦ 사업내용 : 주거용지, 상업용지, 학교용지 등 (294,281천㎡)

◦ 사업기간 : 2011. 2 ~ 2021

◦ 총사업비 : 387억원 (조성비 208억, 보상비 90억, 기타 89억)

□ 추 진 계 획

◦ 道 도시계획위원회 신청                          : 2019.  2.

◦ 도시개발사업시행자 지정 검토                    : 2019.  4.

※ 직영 또는 사업자 지정

◦ 실시설계 및 환지, 지장물 보상                    : 2019.  7.

◦ 공사 착수                                        : 2020.  3.

□ 기 대 효 과

◦ 신재생자원센터 주변 주거ㆍ생활환경 개선 및 지역 균형발전

◦ 공동주택 공급에 따른 익산시 아파트 가격 인상요인 해소