건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 주요성과
□	2019 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충 환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공 장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여 도로확포장으로지역간소통원활및통행불편해소 생태하천정비로생활환경개선및주민편익도모 조명시설설치로보행환경개선및야간통행불편해소

일  반  현  황

□ 기       구

					건 설 과
건설행정				도로시설			하천시설					하천관리					가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	22		1	5	11	3	2
현 원	23		1	8	9	1	4
증 감				3	△2	△2	1

□ 사 무 분 장

◦건설행정 : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반

◦도로시설 : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업관련

협의  시·군도, 농어촌도로 확·포장사업 추진

◦하천시설 : 하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦하천관리 : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과,

생태하천관리

◦가로등관리: 가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	153.779	169.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	27.169	75.034	27%

□ 하 천 점 용 허 가  현황(2018년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
712	582	64	66	371,778	309,474	12,057	50,247

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
28,222등	18,979등	9,243등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2018 주요성과

□ 성      과

◦ 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민 편익 증대

▸국도23호 오산교차로 진입램프 설치공사

- 도로확포장 L=0.29㎞, B=8.0m

- 공사준공 : 2018. 09. 03.

▸오산 외용(외검선) 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.80㎞, B=8.0m

- 공사준공 : 2018. 12. 18.

▸오산 장신-만석간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.61㎞, B=8.0m

- 공사준공 : 2018. 12. 20.

◦ 평화육교 재가설을 통한 안전성 확보와 KTX호남고속철도의 안전한 교통망 구축

▸대체우회도로 설치(4차로)	: 2018.  4.  ~  7.

▸평화육교 철거(전면통제 2018.7~2019.12)	: 2018.  7.  ~  9.

▸평화육교 기초공사	: 2018. 10. ~ 12.

※ 전체 공정율 23.1%

◦ 왕궁천 하천정비공사 총사업비 변경 및 발주

▸총사업비 변경(2018. 10. 24.) : 247→ 473억원, 증226

▸왕궁1지구 공사 발주(2018. 11. 26.) : 191억원(도급 129, 관급 62)

◦ 도로조명설치 및 보수로 밝은거리 조성하여 여성·노약자 등에게 안전한 보행 환경 제공에 기여

▸노후가로등정비 507개소, 보안등 신규설치 294개소

▸가로등, 보안등 민원접수 및 처리 5,951건

2019주요업무계획

		군도23호선 도로확포장 평화육교 재가설사업 시·군도 및 농어촌도로 확포장 왕궁천 하천환경 정비사업 동면천 하천환경 정비사업 소하천 정비사업 만경강 문화관 조성사업 도로조명 조도개선

1		군도23호선 도로 확･포장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2020. 11.

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=16.5-20.5m(2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 125억원(공사비 90, 보상비 31, 기타 4)

□ 추 진 계 획

◦ 잔여토지 손실보상 및 수용재결	: 2019.  1. ~  7.

▸대상 - 96필지 16,040㎡

◦ 공사 추진(토공,배수공,구조물공,포장공)	: 2019.  1. ~ 2020. 11

◦ 공사 준공	: 2020. 11.

□ 기 대 효 과

◦ 삼기 일반산업단지 조성에 따른 함열~산업단지간 교통증가에 대비

◦ 원활한 교통망 구축으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 촉진

2		평화육교 재가설 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2020.  6

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m(4차로 ⇒ 6차로)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 익산시 190)

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

□ 추 진 계 획

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2019.  1. ~ 2020.  6.

▸농업용수로 이설, 접속램프 및 교량 재가설

◦ 평화육교 완전개통	: 2020.  6.

□ 기 대 효 과

◦ 안전등급 D등급인 평화육교 재가설로 대중교통 안전성 확보 및 호남고속철도(KTX) 완전한 정상화 실현

3		시·군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산, 용동, 망성, 용안, 금마, 왕궁, 삼기, 함라, 춘포,                   낭산, 황등, 어양동, 부송동 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2021.

◦ 사업규모 : L= 25.22km, B= 6.5~ 23.0m

◦ 총사업비 : 22개사업 12,531백만원 (본예산 6,957, 이월예산 5,574)

▸ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사	:  802백만원

- L=1.156km, B=7.0m	(본 392, 명 290, 사 120)

▸ 용안 창리~법성간 도로확·포장공사	: 1,145백만원

- L=0.84km, B=8.0m	(본 490, 명 495, 사 160)

▸ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사	:  648백만원

- L=1.21km, B=7.0m	(사 648)

▸ 함라 칠성~다은간 도로확.포장공사	:  713백만원

- L=1.00km, B=8.0m	(본 250, 명 463)

▸ 망성 군도10호~금지간 도로확·포장공사	:  731백만원

- L=1.20km, B=8.0m	(본 375, 명 356)

▸ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사	:  340백만원

- L=0.30km, B=6.0m	(명 340)

▸ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사	:  535백만원

- L=0.93km, B=7.0m	(본 180, 명 297, 사 58)

▸ 왕궁 온수~시대간 도로확·포장공사	:  309백만원

- L=3.00km, B=8.0m	(명 309)

▸ 춘포 토다리~덕동간 도로확·포장공사	:  703백만원

- L=1.00km, B=8.0m	(본 450, 명 253)

▸ 어양동 어곳~부평간 도로확·포장공사	:  885백만원

- L=0.80km, B=8.0m	(본 500, 명 385)

▸ 금마 신정~중왕간 도로확·포장공사	:  600백만원

- L=1.20km, B=8.0m	(본 500, 명 100)

▸ 황등 도선~외화간 도로확·포장공사	:  400백만원

- L=0.70km, B=8.0m	(본 300, 명 100)

▸ 오산 제일교회~정각사간 도로확·포장공사	:  700백만원

- L=0.40km, B=8.0m	(본 500, 명 200)

▸ 왕궁 양동마을 진입도로 확·포장공사	:  700백만원

- L=0.60km, B=8.0m	(본 600, 명 100)

▸ 하나로~소간촌간 도로확·포장공사	:  600백만원

- L=1.00km, B=8.0m	(본 500, 명 100)

▸ 오산면 소재지 진입도로 확·포장공사	:  600백만원

- L=0.95km, B=23.0m	(본 500, 명 100)

▸ 오산역-상아마을간 병목구간 도로확·포장공사	:  200백만원

- L=0.2km, B=8.0m	(본 200)

▸ 춘포 창평마을 진입도로 확·포장공사	:  100백만원

- L=0.7km, B=8.0m	(본 100)

▸ 왕궁 군도26호선 도로확·포장공사	:  220백만원

- L=1.7km, B=8.0m	(본 220)

▸ 금마 갈산-서편간 도로확·포장공사	:  500백만원

- L=1.6km, B=8.0m	(본 500)

▸ 삼기산사거리 회전교차로 설치사업	:  280백만원

- 회전교차로 1식	(본 280)

▸ 용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업	:  700백만원

- 회전교차로 1식	(명시 700)

□ 추 진 계 획

◦ 망성 신성~관산간 도로 확·포장공사

▸ 미매입토지 및 지장물 협의매수	: 2019.  1 ~  5

▸ 공사 추진	: 2019.  3 ~ 12

◦ 용안 창리~법성간 도로 확·포장공사

▸ 미매입토지 및 지장물 협의매수	: 2019.  1 ~  5

▸ 공사 추진	: 2019.  3 ~ 12

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸ 공사 준공	: 2019.  3

◦ 함라 칠성~다은간 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2019.  1  ~  5

▸ 공사 추진	: 2019.  3  ~ 12

◦ 망성 군도10호~금지간 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2018.  1  ~  5

▸ 공사 추진	: 2019.  3  ~ 12

◦ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  1  ~  5

▸ 공사 추진	: 2019.  3  ~ 12

◦ 금마 누동~신촌간 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 협의매수	: 2019.  1 ~  5

▸ 공사 추진	: 2019.  3 ~ 12

◦ 왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  1 ~ 12

▸ 공사 추진	: 2020.  3 ~ 12

◦ 춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  1 ~ 12

▸ 공사 추진	: 2020.  3 ~ 12

◦ 어양동 어곳~부평간 도로 확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  1 ~ 2020. 12

▸ 공사 추진	: 2021.  3 ~ 12

◦ 금마 신정~중왕간 도로확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  5 ~ 12

▸ 공사 추진	: 2020.  3 ~ 12

◦ 황등 도선~외화간 도로확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  5 ~ 12

▸ 공사 추진	: 2020.  3 ~ 12

◦ 오산 제일교회~정각사간 도로확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  5 ~ 10

▸ 공사 추진	: 2019.  8 ~ 2020.  6

◦ 왕궁 양동마을 진입도로 확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  5 ~ 10

▸ 공사 추진	: 2019.  8 ~ 2020.  6

◦ 하나로~소간촌간 도로확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  5 ~ 12

▸ 공사 추진	: 2020.  3 ~ 12

◦ 오산면 소재지 진입도로 확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  6 ~ 2020. 12

▸ 공사 추진	: 2021.  3 ~ 12

◦ 용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 공사 추진	: 2019.  5 ~ 12

◦ 오산역-상아마을간 병목구간 도로확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 공사 추진	: 2019.  5 ~ 12

◦ 춘포 창평마을 진입도로 확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~ 12

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2020.  1 ~  4

▸ 공사 추진	: 2020.  5 ~ 12

◦ 왕궁 군도26호선 도로확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  6

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  7 ~ 2020.  6

▸ 공사 추진	: 2020.  7 ~ 2021. 12

◦ 금마 갈산-서편간 도로확·포장공사

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  6

▸ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  7 ~ 2020. 6

▸ 공사 추진	: 2020.  7 ~ 2021. 12

◦ 삼기산사거리 회전교차로 설치사업

▸ 실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  1 ~  4

▸ 공사추진	: 2019.  5 ~ 12

□ 기 대 효 과

◦ 읍․면 농촌지역 도로망 확충으로 원활한 교통통행 및 기계화 영농기반 구축으로 주민편익 증대

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2019년 예산액	금후 투자
	26개사업	L=25.22km B=6.5-23m	39,227	10,565	6,957	21,705
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,198	806	392		공사발주	망성 303 (신선선)
2	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	1,250	760	490		보상	용안 203 (자석선)
3	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	1,847			공정율 90%	용동 204 (삼두선)
4	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	940	690	250		착공	함라 201 (진다선)
5	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,055	680	375		착공	군도 10호
6	용동 흥왕마을 진입로 도로확.포장	L=0.3km B=6.0m	370	370			착공	용동 209 (흥왕선)
7	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	505	180	606	착공	금마 102 (누부선)
8	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	616		2,187	용지 57%	군도 21호
9	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,920	427	450	1,043	보상	춘포 103 (신화선)
10	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m	1,950	450	500	1,000	보상	시도 1268
11	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,500	100	500	900	설계중	금마 202 (서오선)
12	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,000	100	300	600	설계중	황등 104 (황팔선)
13	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	700	200	500		설계중	오산 203 (신수선)
14	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m	700	100	600		설계중	왕궁 207 (양곡선)
15	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,400	100	500	800	설계중	삼기 203 (석라선)
16	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=23.0m	1,900	100	500	1,300	설계중	군도2호
17	오산역 –상아마을간 도로확포장공사	L=0.2km B=8.0m	200		200		신규	오산 203 (신수선)
18	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	L=0.7km B=8.0m	1,500		100	1,400	신규	춘포 308 (창평선)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2019년 예산액	금후 투자
19	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577	220	2,173	용지 75%	군도 26호
20	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	279	500	2,050	용지 45%	금마 101 (서삼선)
21	삼기산사거리 회전교차로 설치	회전교차로 1식	280		280		신규	삼기209 삼기103 지방도722
22	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	회전교차로 1식	700	700			설계중	지방도706 용안201
23	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
24	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
25	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
26	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)

4		왕궁천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리~춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 :  2015. ~ 2022.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25km

◦ 총사업비 : 47,368백만원(국비 23,684, 도비 9,474, 시비 14,210)

▸2019년 예산 확보액 – 5,937백만원

◦ 사업내용 : 하천정비 L=9.25km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 추 진 계 획

◦ 왕궁천 하천기본계획(변경) 고시(익산지방국토청)	: 2019. 2.

◦ 왕궁천 하천공사 실시계획인가(변경) 고시	: 2019. 3.

◦ 왕궁1지구 공사 착수(공사발주 의뢰 : 2018. 11.)	: 2019. 3.

▸위  치 : 익산천 합류점 ~ 흥암교(4.62㎞)

▸기  간 : 2019. ~ 2020.

□ 기 대 효 과

◦ 통수 단면 부족 및 노후․미 개수된 하천제방․호안을 체계적으로

정비하여 주택 및 농경지 침수 등 하천 재해예방 도모

5		동면천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리~왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 :  2017. ~ 2021.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05km

◦ 총사업비 : 15,480백만원(국비 7,740, 도비 3,096, 시비 4,644)

▸2019년 예산 확보액 – 5,080백만원

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 추 진 계 획

◦ 설계경제성 검토	: 2019. 2.

◦ 실시설계 협의(2차, 익산지방국토청)	: 2019. 3.

◦ 건설기술심의(전북도)	: 2019. 4.

◦ 총사업비 협의(익산지방국토청)	: 2019. 5.

◦ 용역 완료 및 인허가	: 2019. 6.

◦ 편입토지 보상 추진	: 2019. 7.

◦ 공사 발주	: 2019. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 개발과 연계한 하천환경개선 및 유역내 안전한 하천관리로 주민의 생명과 재산 보호

6		소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
대판천 소하천정비공사	삼기면 연동리 일원	2017. ~ 2019.	3,057(국 1,528 시 1,529)	소하천정비 L=1.275km
동산천 소하천정비공사	웅포면 맹산리 일원	2018. ~ 2020.	2,700 (국비 1,350 시비 1,350) ▸2019년 : 386	소하천정비 L=1.018km
닭작골천 소하천정비공사	여산면 여산리 일원	2019. ~ 2022.	3,902 (국비 1,951 시비 1,951) ▸2019년 : 372	소하천정비 L=1.4km

□ 추 진 계 획

◦ 닭작골천 소하천정비공사

▸ 닭작골천 실시설계 용역 발주 및 추진	: 2019. 1.

▸ 닭작골천 사전설계 검토(전북도)	: 2019. 8.

▸ 닭작골천 소하천정비공사 시행공고 및 편입토지 보상	: 2019. 11.

◦ 동산천 소하천정비공사

▸ 동산천 인허가 추진	: 2019. 1.

▸ 동산천 소하천정비공사 시행공고 및 편입토지 보상	: 2019. 2.

▸ 동산천 소하천정비공사 발주 및 추진	: 2019. 7.

◦ 대판천 소하천정비공사 완료	: 2019. 9.

□ 기 대 효 과

◦ 하천유역 정비로 농경지 침수 및 하천재해예방 등 안전한 하천관리

◦ 효율적인 하천이수․치수를 통한 공공복리 증진

7		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년

◦ 사 업 비 : 113억원(국비 100억, 시비 13억 토지매입비)

◦ 사업내용 : 13,814㎡[(지하 1층, 지상2층)/연면적 1,686㎡]

◦ 시설현황 : 다목적실, 로비, 사무실, 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강신탁지구하천정비사업에 포함)

□ 추 진 계 획

◦ 토지 및 지장물 보상 추진(익산시)	: 2018. 12. ~

◦ 건축 및 토목 등 공사 추진(익산지방국토관리청)   : 2019. 1. ~ 2020.12.

◦ 건축물 내 콘텐츠관련 발주(익산지방국토관리청)	: 2019. 3. ~

□ 기 대 효 과

◦ 만경강에 문화관을 조성하여 만경강과 관련된 역사와 생활상을 전시·소개하고 이용객들에게 편의 제공 및 체험활동 참여확대 유도

8		도로조명 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 생활환경개선보안등 설치 외 9개사업

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사업예산 : 791백만원

◦ 사업내용 : 야간통행불편지역 도로조명설치 및 보수, 노후가로등 정비 및 교체 설치 등

◦ 주요사업 세부내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		10개 사업	791,700
보 안 등 신규설치	생활환경개선보안등설치	보안등신규설치 194개소	237,000
	주민숙원사업보안등설치	보안등신규설치 46개소	52,000
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비120개소	120,000
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 60개소	60,000
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	120,000
	동지역 보안등 보수	동지역 고장보안등 수리	78,200
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	42,000
	전기안전점검부적합보수단가	점검부적합보수 300개소	30,000
	1공단 중앙체육공원 사거리~비원삼거리앞 가로등 설치공사	LED가로등 설치15개소	30,000

□ 추 진 계 획

◦ 가로등･보안등 단가설계 및 계약의뢰	: 2019. 1.

◦ 가로등･보안등 단가착공 및 사업시행	: 2019. 1. ~ 12.

◦ 보안등 신규설치 현장조사 및 사업추진	: 2019. 2. ~ 6.

◦ 가로등･보안등 단가 준공	: 2019. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 야간통행이 불편한 마을안길, 골목길 등에 조명시설개선 및 설치로  보행자의 야간보행권 확보 및 안전사고 예방