도시재생과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 주요성과
□	2019 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 행복한 품격도시 익산건설을 위해 시민 중심의 도시 계획과 개발 및 관리

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	미래지향적인 도시계획수립 인간과 환경을 중시하는 도시개발 시민중심의 도시문제 해소

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	시민이 공감하는 도시관리계획으로 지역간 균형발전 도모 친환경적이고 생활을 중시하는 도시개발 원도심 재생을 통한 생활환경개선 및 지역활성화

일   반   현   황

□ 기     구

						도시재생과
재생행정			도시계획			도시개발				재생디자인			재생시설			자전거정책

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	1	6	7	6	4
현 원	25	1	1	8	8	3	4
증 감				2	1	△3

□ 사 무 분 장

◦ 재생행정  :  국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 개발행위 허가

◦ 도시계획  :  도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정

◦ 도시개발  :  도시계획 도로개설 사업 시행

◦ 재생디자인  :  도시재생활성화사업, 경관기본계획 및 공공디자인기본계획수립

◦ 재생시설  :  새뜰마을 사업, 도시재생 시설사업

◦ 자전거정책  :  자전거정책 수립, 자전거도로 계획수립 및 시행

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.925	76.089	214.813	194.070	21.954	-
비율(％)	100	15.0	42.5	38.3	4.3	-

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	77.428	17.901	1.870	10.470	47.187	-
비율(％)	100	23.1	2.4	13.5	61.0

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	경관지구	미관지구	고도지구	방화지구	보존지구 (역사문화환경 보존지구)	취락지구 (자 연 취락지구)	비 고
지구수	135	3	29	10	9	1	83	-
면 적	20,283	12,680	2,478	985	1,202	202	2,736	-

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : ㎡, 백만원, %)

시 설 명		시설결정		집행시설		미집행시설			집행률 (%)
		개소	면적	개소	면적	개소	면적	사업비
총 계		2,008	30,675,428	1,856	25,263,843	152	5,411,585	602,464	82.4
도로	소 계	1,430	10,944,603	1,322	10,288,971	108	655,632	165,516	94.0
	광 로	6	1,266,624	5	1,181,630	1	84,994	8,500	93.3
	대 로	68	3,290,601	44	2,926,838	24	363,763	101,659	88.9
	중 로	339	3,915,938	322	3,800,735	17	115,203	26,671	97.1
	소 로	1,017	2,471,440	951	2,379,768	66	91,672	28,686	96.3
공원	소 계	105	5,853,038	83	1,762,109	22	4,090,929	389,890	30.1
	근린공원	50	5,215,711	31	1,341,612	19	3,874,099	364,847	25.7
	역사공원	2	76,461	1	50,593	1	25,868	3,945	66.2
	수변공원	2	28,058	1	8,512	1	19,546	4,886	30.3
	어린이공원	39	91,130	39	91,130	0	0	0	100.0
	소공원	10	36,659	10	36,659	0	0	0	100.0
	문화공원	1	35,279	1	35,279	0	0	0	100.0
	묘지공원	1	369,740	0	198,324	1	171,416	16,212	53.6
녹지	소 계	99	1,188,984	84	575,376	15	613,608	40,803	48.4
	완충녹지	79	1,124,936	65	514,898	14	610,038	40,595	45.8
	경관녹지	16	58,288	15	54,718	1	3,570	208	93.9
	연결녹지	4	5,760	4	5,760	0	0	0	100.0
기타	소 계	374	12,688,803	367	12,637,387	7	51,416	6,255	99.6
	주차장	49	149,033	49	149,033	0	0	0	100.0
	광 장	32	677,209	27	666,100	5	11,109	1,366	98.4
	공공청사	16	197,203	16	197,203	0	0	0	100.0
	유원지	1	31,200	0	0	1	31,200	4,068	0.0
	운동장	1	260,000	0	250,893	1	9,107	821	96.5
	기 타	275	11,374,158	275	11,374,158	0	0	0	100.0

2018 주요성과

□ 성      과

◦ 장기 미집행 도시계획시설 정비를 통한 시민 재산권 보호 기여

▸대상시설 : 미집행 도시계획시설 405개소 중 일몰제 이전 재정적

집행이 어려운 시설

▸해제(정비)시설 : 267개 시설  594,047㎡

- 중로 : 45개 노선  253,599㎡

- 소로 : 221개 노선 336,158㎡

- 광장 : 1개 시설  4,290㎡㎡

◦ 도시재생 사업으로 원도심 지역 활성화에 기여

▸도시재생 선도지역 지정을 위한 주민 공청회 개최(2018. 1. 31.)

▸도시재생 선도지역 지정(2018. 5. 1.)

▸2018 소규모 도시 재생사업 공모 선정(2018. 7.)

▸ 도시재생 활성화계획 국가지원 확정 통보(2018. 8. 3.)

▸찾아가는 도시재생 아카데미 운영(2018. 9. ~ 10.)

◦ 도시계획도로 개설을 통한 시민 편익증진 기여

▸구)모현동사무소 옆 도로개설(L=560m, B=8m)

▸모현 배산~장신택지간 도로개설(L=145m, B=20→25m)

▸도･농 연결 도로 개설(L=150m, B=50m)

◦ 자전거 이용 활성화 사업으로 자전거 이용자 만족도 증가

▸익산시민 자전거 보험 가입(사망 및 후유장애, 진단 위로금 지원 등)

▸웅포 곰개 나루 자전거 대여소 운영

- 4월~6월, 9월~11월(주말 및 공휴일 운영), 자전거 무료 대여(50대)

2019주요업무계획

		도시기본계획 수립용역 지구단위계획 재정비 수립용역 송학동 학곤선(대로3류7호) 도로확포장 마한로 미개설 구간 도로 개설 도시재생 뉴딜사업(역사가문화로) 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 동산동 월담지구 새뜰마을사업 자전거 이용 활성화 사업

1		도시기본계획 수립 용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역기간 : 2018. 12 ~ 2020. 12

◦ 대상지역 : 익산시 행정구역 전체

◦ 용 역 비 : 914백만원

◦ 주요내용

▸국가식품클러스터, KTX 호남고속철도, 세계문화유산, 도시재생사업 등 익산시 도시여건을 반영한 지역적 특성 및 계획방향·목표 설정

▸도시성장 추세를 대비한 도시공간을 재진단하고 사회적 여건변화에 따른 도시정책방향 재점검

▸도시공간구조, 생활권 설정 및 인구의 배분, 토지이용계획 수립 등

□ 추 진 계 획

◦ 기초조사 및 현황조사	: 2019. 1. ~ 6.

◦ 도시기본계획(안) 작성	: 2019. 7. ~ 12.

◦ 행정절차 이행	: 2020. 1. ~ 2020. 8.

▸주민공청회, 시의회 의견청취, 도시계획위원회 자문 및 심의 등

◦ 도시기본계획 수립(보고서 작성 및 승인)	: 2020. 9. ~ 2020. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도·농 균형발전과 미래지향적인 도시로의 성장을 위한 중장기 발전전략 수립으로 지역발전을 위한 기틀마련

2		지구단위계획 재정비 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역기간 : 2019. ~ 2020.

◦ 대상지역

연번	지구단위계획명	위 치	면적(㎡)	계획수립일	비 고
1	영등1차지구	영등동	339,135	2004. 9.10	도시지역
2	영등2차지구	영등･어양동	951,493	2000.12.29	도시지역
3	부송3차지구	부송동	248,505	2000.12.29	도시지역
4	마동지구	마동	446,695	2004. 9.10	도시지역
5	목천취락지구	목천동	441,224	2002. 8.14	비도시지역
6	함라취락지구	함라면	309,150	2002. 8.14	비도시지역

◦ 용 역 비 : 600백만원

◦ 주요내용

▸기존 지구단위계획의 타당성검토 및 재정비

▸교통영향평가, 경관성검토 등 기초조사를 통한 대상지 여건 분석 등

□ 추 진 계 획

◦ 용역 입찰공고 및 착수	: 2019. 1. ~ 2019. 3.

◦ 기초조사 및 현황조사	: 2019. 3. ~ 2019. 9.

◦ 지구단위계획 결정(변경)(안) 작성	: 2019. 10. ~ 2020. 2.

◦ 행정절차 이행	: 2020. 3. ~ 2020. 7.

▸주민 공람공고, 관계기관 협의, 도시건축공동위원회 심의 등

◦ 지구단위계획 결정 및 지형도면고시	: 2020. 8. ~ 2020. 9.

□ 기 대 효 과

◦ 택지개발사업 준공 후 10년이 경과된 지역, 도시외지역에 지정된 취락지구에 대하여 대상지 여건을 반영한 지구단위계획 정비를 통한   체계적이고 계획적인 토지이용 및 관리 도모

3		송학동 학곤선(대로3류7호) 도로확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  : 송학동 지안리즈@~한국타이어 티스테이션 일원

◦ 사업규모  : L=820m , B=8→25m(대로3류7호)

◦ 사업기간  : 2018. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용  : 도시계획도로개설

◦ 총사업비  : 4,182백만원(공사비 2,682･보상비 1,500)

□ 추 진 상 황

◦ 토지보상	: 2004. 3. ~ 2009. 12.

◦ 공사착공 및 준공(폭8M)	: 2009. 11. ~ 2010. 3.

◦ 시 투융자심사(적정)	: 2017. 11. 2.

◦ 실시설계용역 준공	: 2018. 7. 20.

◦ 공사착공(폭25M)	: 2018. 10. 25.

□ 금 후 계 획

◦ 공사준공(폭25M)	: 2019. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

4		마한로 미개설 구간 도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 어양동 409-5번지(어양 변전소) 일원

◦ 사업규모 : L=520m, B=25m(계속사업)

▸ 1차분 : L=230m,  2차분 : L=120m, 3차분 : L=170m

◦ 사업기간 : 2011. 1. ~ 2022. 12.

◦ 총사업비 : 8,520백만원(공사비 3,842․보상비 4,678)

※ 연도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구분	총 계	2018년 까지	2019년	2020년 이후
총계	8,520	4,401	802	3,317
특별교부세	900	900	-	-
시비	7,620	3,501	802	3,317

□ 추 진 상 황

◦ 편입토지 및 지장물 보상(1공구 100%)	: 2018. 2. ~ 5.

▸1차분 총 11필지 5,913㎡ 보상완료

◦ 1차분 공사 착수(토목, 전기, 건설폐기물)	: 2019. 1.

▸ 토목공사는 총액 계약하여 계속사업으로 시행

□ 금 후 계 획

◦ 2공구 편입 토지 보상	: 2019. 1. ~ 8.

◦ 1공구 공사 준공	: 2019. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

5		도시재생 뉴딜사업(역사가문화로)

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 역사가(驛史街) 문화로(文化路)

◦ 위    치 : 익산시 중앙동1가 24번지 일원(원도심 지역)

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.(5개년)

◦ 사업면적 : 185,007㎡

◦ 사 업 비 : 270억(국 150 도25 시 75, 기타20)

◦ 사업내용 : 기초생활인프라 조성, 상권활성화사업, 생활환경개선사업
공기업참여사업(공공상가임대사업), 문화관광자원화사업,
특화거리조성, 도시재생대학 및 도시재생 비지니스육성 등

□ 추 진 상 황

◦ 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 공모 선정	: 2017. 12. 14.

◦ 도시재생 선도지역 지정	: 2018.  5.  1.

◦ 활성화계획 수립(안) 익산시 도시재생위원회 심의	: 2018.  6. 19.

◦ 활성화계획 수립(안) 승인 신청(국토교통부)	: 2018.  6. 20.

◦ 실현가능성 및 타당성 평가결과 통보	: 2018.  7. 17.

▸단위사업 보류(꿈꾸는시장청년몰, 역사가문화로시장길, 글로벌푸드거리)

◦ 도시재생 활성화계획 승인 통보	: 2018.  8.  3.

▸조건부 승인(보류된 3개 단위사업에 대해 국가재정지원 보류)

◦ 활성화계획 변경 및 실행방안 수립용역 착수	: 2018. 10. 23.

▸조건부여 및 권고의견에 대한 보완 및 활성화계획 변경

◦ 특화거리 조성(3개소) 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2018. 12. 11.

▸창업지원어울림플랫폼 커뮤니티 연결로, 교복문화거리, 문화이리로

◦ 거점 조성 사업 추진을 위한 보상	: 2018. 12. 24.

▸창업지원어울림플랫폼, 다기능 주민편의시설

□ 추 진 계 획

◦ 활성화계획 변경 및 실행방안(안) 수립	: 2019. 2.

◦ 활성화계획 변경 도시재생실무위원회 재심의(국토교통부)	: 2019. 3.

◦ 15개 단위사업 연차별 추진계획에 따라 사업 추진	: 2019. ~ 2022.

□ 기 대 효 과

◦ 침체된 지역상권의 새로운 문화 창출을 통한 상권 활성화

◦ 지역 재생 자산 발굴과 활용을 통한 익산 역세권 정체성 창출

◦ 지역 주민 생활 밀착형 자산정비로 쾌적하고 안전한 환경 조성

6		도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립

□ 사 업 개 요

◦ 사업범위 : 익산시 도시지역

◦ 용역기간 : 2018. 11. ~ 2019. 11.(12개월)

◦ 용 역 비 : 803백만원

◦ 주요내용

▸우리시 여건변화 등을 반영한 도시재생 전략계획 재검토 및 변경

▸2019년 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립, 주민역량강화사업 추진 등

□ 추 진 계 획

◦ 현황조사 및 분석	: 2018. 12. ~ 2019. 1.

◦ 도시재생 전략계획 및 활성화계획(안) 수립	: 2019.  2.

◦ 도시재생 전략계획 주민공청회 및 의회의견청취	: 2019.  3.

◦ 도시재생 전략계획 승인 및 공고	: 2019.  5.

◦ 국토부 도시재생 뉴딜사업 공모 신청	: 2019.  7.

◦ 도시재생 활성화계획 승인 및 공고	: 2019. 10.

◦ 용역준공	: 2019. 11.

□ 기 대 효 과

◦ 익산시 도시재생을 위한 장기적 비전과 전략 확립

◦ 도시재생사업 추진을 위한 세부 활성화지역 선정 등 토대마련

◦ 뉴딜사업 공모 적극 대응 및 국비확보를 통한 재생사업 촉진

7		동산동 월담지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 동산동 356번지 일원 (사업면적 약 43,300㎡)

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2019년(4개년)

◦ 총사업비 : 3,850백만원(국비 2,694, 도비 346, 시비 810)

◦ 사업내용 : 주택정비 지원, 안전확보, 생활·위생인프라, 마을공동체 지원사업,

주민역량강화사업등

□ 예 산 현 황

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2019년 이전	2019년			비고
			소계	확보	미확보
총계	3,850	1,886	1,964	1,964
국비	2,694	1,320	1,374	1,374
도비	346	169	177	177
시비	810	397	413	413

□ 추 진 상 황

◦ 새뜰마을사업 공모 선정	: 2016. 2.

◦ 새뜰마을사업 마스터플랜 수립용역 착수	: 2016. 9.

◦ 일부주민 사업취소요구에 따른 주민면담	: 2018. 3.

◦ 주민설득에 따른 공사 및 용역 재착수	: 2018. 7.

◦ 새뜰마을 사업 마스터플랜 변경승인	: 2018. 7.

◦ 산사태 위험지구 개선사업 완료	: 2018. 12.

▸사면보강, 진입로 확장 및 주차장, 쉼터 조성

◦ 주택정비사업 완료	: 2018. 12.

▸빈집철거 9개소, 슬레이트지붕개량 7개소, 집수리 21개소

□ 금 후 계 획

◦ 연차별 집행계획에 따른 사업 추진	: 2019. 1. ~ 12.

▸안전사업 추진(사면보강사업 및 축개개선사업)

▸마을안길정비(소방도로 개설) 및 도시가스 공급

▸주민공동이용시설 신축 및 주민역량강화 사업 추진

8		자전거 이용 활성화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 녹색교통(재생자전거) 만들기 사업

▸사업기간 : 매년 3월~11월(혹서기 제외)

▸위    치 : 모현동 자전거 보관소(구, 이리농악전수관)

▸주요내용 : 방치․폐자전거 수거 및 수리, 저소득층 및 사회단체 기증

- 민생경제과 지역공동체 일자리 사업 인력 활용(4~6명)

◦ 자전거 대여소 운영

▸사업기간 : 매년 4월~11월(혹서기 제외, 주말 및 공휴일 운영)

▸위    치 : 2개소(웅포 곰개나루 관광지, 만경강 사수정 일원)

▸주요내용 : 재생자전거를 이용한 자전거 타기 문화 확산

- 자전거 무료대여(각50대 운영), 기간제 인력 활용(4명)

◦ 자전거 이용시설 정비 사업

▸사업기간 : 매년 3월~12월

▸위    치 : 익산시 일원

▸주요내용 : 자전거 이용시설(도로, 거치대, 공기주입기 등) 정비

- 자전거도로 정비(탑천외 3개노선 L=8.9Km, 440백만원)

- 자전거도로 일상 유지보수(전체 116개노선 L=178Km, 100백만원)

◦ 자전거 보험 가입

▸사업기간 : 2019. 3. ~ 2020. 3.

▸주요내용 : 익산시민 대상 자전거 보험 가입(120백만원)

- 보장내용(사망, 후유장애, 4주이상 입원, 교통사고 처리 지원 등)

□ 추 진 계 획

◦ 녹색교통 만들기 사업

▸방치･폐자전거 수거 및 재생자전거 생산	: 2019. 3. ~ 11.

▸재생자전거 기증	: 2019. 10.

◦ 자전거 대여소 운영

▸만경강 자전거 대여소 설치	: 2019. 2. ~ 3.

▸기간제 인력 채용(웅포, 만경강)	: 2019. 3.

▸운영 개시	: 2019. 4.

◦ 자전거 이용시설 정비사업

▸설계(자체) 및 준공	: 2019. 3. ~ 10.

- 자전거 도로(탑천외 3개노선)

▸자전거 이용시설 정비	: 2019. 3. ~ 12.

- 자전거 도로 및 편의시설(거치대, 공기주입기 등) 정비

◦ 자전거 보험 가입

▸보험계약 추진	: 2019. 2. ~ 3.

□ 기 대 효 과

◦ 녹색 교통수단으로서 자전거에 대한 인식 제고

◦ 자전거 기반시설 확충을 통해 자전거 이용자의 편의 제공