하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 주요성과
□	2019 주요업무계획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전 정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지 조성

일   반   현   황

□ 기          구

							하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리				지하수			폐수처리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	32	1	8	6	8	9
현 원	28	1	9	11	4	3
증 감	▵4		1	5	▵4	▵6

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사, 유천 생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 마을하수처리시설 운영 및 유지관리, 하수중계펌프장 운영 및 유지관리, CSOs 운영 및 유지관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과
◦	폐수처리 :	공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영관리, 산업단지 폐수 유입 승인, 배수설비 신고, 비용부담금 부과징수 등

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2018. 12.	비 고
시설	총인구	천명	294
	하수인구	천명	269
	보급률	%	91.4
하수처리	1일평균하수발생량	톤	118,199
	1일평균하수처리량	톤	115,852
	하수처리율	%	98.0
하수도 사용	개소수	전	39,422
	톤당 평균요금	원	556.5	2017년 기준

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	28	145,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
제3일반산업단지 공동폐수처리시설	1	5,500㎥/일	직영

2018 주 요 성 과

□ 오·우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

◦ 오산 문화마을 하수관거 정비공사 완료 : 관거정비 5.4km, 배수설비 87가구

◦ 금마3처리분구 하수관거 정비공사 완료 : 관거정비 1.0km, 배수설비 37가구

◦ 황등1처리분구 하수관거 정비공사 추진 : 관거정비 0.6km, 배수설비 19가구

◦ 남부2-1 배수분구 하수관거 정비공사 추진 : 배수설비 35가구

□ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

◦ 총27개소(139,561㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

◦ 하수처리시설 기능보강 추진으로 처리효율 향상 및 수질오염 저감

‣ 여산처리장 용수공급펌프 교체공사 외 16건 482,883천원

□ 최적의 하수찌꺼기 감량화사업을 위한 공법선정 및 행정절차 진행

◦ 기술제안서 경제성 검토 및 공법심의를 통한 최적 공법 선정

◦ 설계의 경제성 검토, 기술자문, 재원협의 등 행정절차 조속 추진

□ 읍·면·동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

◦ 하수도 정비 : 54건 3.1km, 하수도기계준설 : 13건 3,640㎥

◦ 하수생활민원 처리를 위한 직원 비상근무조 편성운영 : 2,680건

‣ 맨홀 및 하수도 준설 689건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차 조정 등           1,991건 실시

2019주요업무

		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 익산시 하수도정비 기본계획 수립용역 하수찌꺼기 감량화 사업 공공하수처리시설 운영관리 소규모 하수도관련 주민숙원사업 유천생태습지 유지관리

1		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업

□ 필  요  성

◦ 시내일원 오․우수 분류식 하수관로 정비를 통한 생활환경개선 및 만경강수계 수질개선과 공공하수처리시설의 운영효율 제고

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 36,490백만원(국비 25,543, 도비 1,094, 시비 9,853)

▸ 2019년 - 6,182백만원(국비 4,328, 도비 185, 시비 1,669)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=30.5km, 배수설비 2,646가구

□ 이 후 계 획

◦ 시설공사 입찰 의뢰(시⇒조달)	: 2019. 1월 중

◦ 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ)	: 2019. 1월 중

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 착공	: 2019. 2 ~ 3월 중

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 준공	: 2021. 12.

◦ 하수도사용개시 및 국비정산 보고	: 2021. 12. ~ 2022. 3.

2		익산시 하수도정비 기본계획 수립용역

□ 필  요  성

◦ 체계적이고 합리적인 하수도정비 기본계획 수립으로 효율적인 하수        행정의 기반 구축 (20년 단위 법정계획 수립)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 6.

◦ 사업내용 : 하수도 기본현황 조사 및 정비기본계획 수립 1식

◦ 총사업비 : 1,800백만원 (시비)

※ 2019년 사업비 : 800백만원

□ 이 후 계 획

◦ 하수도정비기본계획 수립 용역 발주	: 2019. 01월 중

◦ 하수도정비기본계획(안) 작성 및 검토 협의	: 2019. 12월 ~

※ 전라북도 새만금수질개선과, 새만금지방환경청 환경관리과

◦ 하수도정비기본계획(안) 승인 [환경부]	: 2020. 상반기 중

3		하수찌꺼기 감량화사업

□ 필  요  성

◦ 하수찌꺼기 감량을 통한 처리시설 운영 및 악취개선, 처리비 절감

◦ 자원순환형 폐기물관리체계 구축으로 온실가스 감축 등 기후변화에 대응

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 26,082백만원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)

◦ 사업내용 : 전처리설비, 혐기성소화조, 바이오가스 정제설비 등 개선 및 신설

▸ 노후된 드럼 스크린⟶협잡물 처리기, 중력식 농축조⟶기계식 농축기로    변경(효율향상)

▸ 소화조 용량부족으로 2기 신설, 기존 4기 개선(교반기, 가온방식 개선)

▸ 바이오가스 저장설비 증설 및 가스정제설비(탈황, 제습, 실록산 제거설비) 신설

▸ 반류수처리시설 신설(하수처리장 연계처리 부하 저감)

▸ 악취제거설비 신설

□ 이 후 계 획

◦ 환경부 재원협의 및 총사업비 변경 신청	: 2019.  1.

◦ 설치인가, 계약심의, 원가심사 등	: 2019.  1. ~ 2.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2019.  2.

◦ 건설공사관리용역 및 본공사 발주	: 2019.  2.

◦ 본공사 착공	: 2019.  3.

◦ 준공(시운전 8개월 포함)	: 2021.

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 필  요  성

◦ 최적의 하수처리를 통한 새만금수질환경 개선으로 자연환경 보전 기여

□ 사 업 개 요

◦ 공공하수처리시설 : 27개소

시설명	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	익산	북부	함열	금마	분뇨
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	90개소	100,000	30,000	6,000	1,100	150
운영방식	직 영		직영77 위탁13	위탁운영[(주)전북엔비텍BTO, 2008.~2028.]

◦ 직영 시설 관리인원 : 4명(전기운영2, 기계1, 열관리운영1)

◦ BTO위탁운영비 예산 : 144억원(도비 5.9억원 시비 138.3억원)

□ 추 진 계 획

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 적정 수질관리 준수

▸ 수질분석 : 익산공공처리시설 외 4개소 1일 1회 6개항목

▸ 소규모하수도시설 및 중계펌프장 운영 관리 : 주 1~2회 수시점검

▸ 소규모 하수처리시설 적체 슬러지 청소 : 월 1~2회

◦ 공공하수처리시설 내진성능평가 용역 : 익산공공 1개소 126,500천원

◦ 수질TMS 위탁관리 용역 : 익산공공 외 3개소 300,000천원

◦ 소규모 수질검사 측정대행 용역 : 여산 외 21개소 393,204천원

◦ 하수처리시설 기술진단 실시 : 익산북부 외 3개소 187,823천원

◦ 하수처리시설 시설 보수 및 개선공사 추진 : 여재 교체 등 166,050천원

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 : 익산공공 외 4개소 3,520천원

5		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 필  요  성

◦ 주민불편 소규모 하수도 관련 시설물 개선공사로 주민불편 해소

◦ 하수관 내 퇴적토, 슬러지 준설, 하수관로 연결 등 주민숙원사업 추진

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 비 : 1,670백만원

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

▸ 주민불편 하수도 시설물 개선 등 소규모 숙원사업 추진

▸ 하수관 내 퇴적토, 슬러지 준설, 하수관로 연결 등 생활환경개선사업 추진

◦ 사 업 량                                 : 36건 / 1,670백만원

▸ 소규모 주민숙원사업                     : 15건 / 1,527백만원

▸ 생활환경개선사업                        : 21건 / 143백만원

□ 이 후 계 획

◦ 사업대상지 현장조사 및 실시설계	: 2019. 1. ~ 4.

◦ 공사 착공 및 준공	: 2019. 3. ~ 12.

6		유천생태습지 유지관리

□ 필  요  성

◦ 시민에게 쾌적한 친수공간 제공 및 시설물 적정관리를 위해 생태습지

유지공사 및 수질관리 모니터링 실시

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 2 ~ 2019. 12.

◦ 사업내용 : 수목 정비, 초화류 식재, 그 밖의 시설물 관리 등

◦ 사 업 비 : 160백만원 (시비)

□ 이 후 계 획

◦ 시설물 유지관리공사 착수                  : 2019. 2월 중

◦ 생태습지 및 수질모니터링 착수             : 2019. 2월 중

◦ 시설물 유지관리공사 준공                  : 2019. 12월 중

◦ 생태습지 및 수질모니터링 준공             : 2019. 12월 중

※ 시설물 수선유지 (제초, 수목관리 등)	: 필요시 상시 시행