2019. 5.

제217회 익산시의회(1차 정례회)

2019 행정사무감사

	경제관광국

문 화 관 광 산 업 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2018년 업무성과 및 반성 ……………………	117
				2.	2018년 예산집행 및 추진사항 …………………	118
				3.	2018년 행정사무감사 지적사항 및 조치 결과…	123
				4.	2018년 상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과…	125
				5.	시정질문 조치 결과 ……………………………………	127
				6.	주요사업 조서(3천만원 이상) ………………………	129
				7.	2018 년 각종 민원(진정․건의․청원 등) 접수 및 처리내역 …	131
				8.	기금 운용 관련 사항 …………………………………	132
				9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 ………………	132
				10.	용역사업 관련 …………………………………………	135
				11.	인․허가 민원처리 관련사항 …………………………	137
				12.	각종공사 설계 변경상황 ……………………………	138
				13.	건설공사 집행 현황(3천만원이상) …………………	140
				14.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ……………………	142
				15.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상) ……………	151
				16.	2018년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 ………	153
				17.	2019년도 명시이월 내역 ………………………………	155
				18.	예산전용 및 예비비 집행 현황 ……………………	156
				19.	공사 준공기한 연장 내역 ……………………………	156
				20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	157
				21.	국․도비 반납 현황 및 사유(2018년도 반납건) ………	157
				22.	2018년도 계획사업 중 미착공사업 현황 …………	158
				23.	2018년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황 ………	158
				24.	2018년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황 ………	158
				25.	2018년도 예산편성 후 전액 미집행 내역 ………………	159
				26.	소송사건 현황 …………………………………………	159
				27.	시홈페이지 접수 민원처리 실태현황 ……………	160

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	익산문화관광재단 운영현황 ……………………………	167
				2.	익산서동축제2018 추진실적 …………………………	168
				3.	문화예술의 거리 관광거점화 추진실적 ………………	169
				4.	가람문학관 운영내역 …………………………………	170
				5.	익산문화원 지원내역 및 지도감독 실적 ……………	171
				6.	관광객 유치를 위한 전략적 마케팅 추진실적 ………	172
				7.	왕궁보석테마 대표관광지 육성사업 추진실적 ………	173
				8.	미륵사지 관광지 조성사업 추진실적 ………………	174
				9	웅포관광지 가족단위 레저시설 설치사업 추진실적 …	175
				10.	함라 한옥체험단지 운영내역 …………………………	176
				11.	건전한 영상문화 육성사업 추진실적 ………………	177
				12.	익산공공영상미디어센터 운영내역 ……………………	178
				13.	교도소세트장 운영현황 …………………………………	179
				14.	문화예술단체 보조금 지급내역(Pool예산) ………	180

감사자료 과 공통사항

1. 2018 업무성과 및 반성

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박 경 희	□
		관광마케팅계장		김 재 숙	□
		관광개발계장		김 학 성	□
		관광시설계장		이 우 진	□
		종무콘텐츠계장		최 은 자	□

□ 성    과

◦ 제99회 전국(장애인)체육대회 문화체전 성공적 운영

▸ 무왕행차거리퍼레이드, 전야축하공연(불꽃놀이), 대한민국예술문화대제전,

전라예술제 등 다채로운 문화예술공연, 스포츠 사진전 및 영화제 등

◦ 시민에게 문화예술 향유 기회 제공

▸ 익산서동축제2018(프로그램수/관람객수)    : 41개/170천명

※ 익산서동축제2017(프로그램수/관람객수   : 30개/160천명

▸ 익산문화원 등 문화예술 행사 지원 : 126개 단체, 165개 사업 지원

◦ 관광객 유치를 위한 관광 활성화 사업추진

▸ 팸투어(롯데JTB여행사 등) 운영	:  6회  233명

▸ 순환형, 테마형 정기・수시투어 운영	: 237회  8,004명(2017년 7,400명)

▸ 관광객 유치 인센티브제도 운영	:   23회 877명

▸ 교도소세트장 운영 현황

- 촬영편수(일수) 14편(27일), 사용료 53,000천원, 관람객수 122,423명(2017년 102,926명)

◦ 관광시설 확충

▸ 교도소세트장 시설 보강 추진

- 바닥 및 연결통로 교체, 소법정, 관람용 망루, 화장실, 주차장 확충 등

▸ 서동공원 백제무왕 광장조성사업 추진

- 백제전통양식 건물설치(서동축제 주무대 및 전망대 활용)

▸ 왕궁보석테마 대표관광지 공룡테마공원 시설 정비

- 함벽정 주변 수변데크 설치 및 구절초 식재, 어린이 놀이체험시설 설치

□ 반    성

◦ 익산시를 대표할 관광자원 부재

‣ 전주(한옥마을), 군산(근대문화도시)와 같이 익산을 대표할 수 있는 관광자원 개발 필요

- 인근 도시와 차별화된 젊은 세대 유입을 위한 관광자원 개발 필요

2. 2018 예산집행 및 추진사항

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박 경 희	□

【2018. 12. 31. 현재】                                                 (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 액					집행액	잔 액	비율	비고
				계	2018 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액	계속비 이월액
문화관광산업과				27,763,779	17,609,943	9,212,767	522,099	418,970	27,317,765	446,014	98.4	명시 5,708,761 사고 2,318,688 계속비 1,511,545
	문화예술 진흥			8,843,461	7,249,782	1,593,679	0	0	8,444,136	399,325	95.5	사고이월 615,552
		지방 문화예술 기반조성		4,226,914	2,633,235	1,593,679	0	0	3,859,904	367,010	91.3	사고이월 615,552
			문화관광 운영지원	110,417	37,240	73,177	0	0	110,389	28	99.9
			익산문화재단 육성	1,875,000	1,875,000	0	0	0	1,875,000	0	100.0
			문화예술의 거리 조성	1,339,140	350,000	989,140	0	0	1,339,128	12	99.9	사고이월 615,552
			문화예술의거리 운영	22,583	22,583	0	0	0	15,681	6,902	69.4
			문화예술인 기념시설 조성(가람)	366,362	0	366,362	0	0	94,726	271,636	25.9
			문화예술 사업 지원	34,000	34,000	0	0	0	34,000	0	100.0
			인문도시 지원사업	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	100.0
			디지털익산문화대전편찬 연구사업	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	100.0
			해공기념도서관 철거공사	165,000	0	165,000	0	0	91,400	73,600	55.4
			가람문학관 운영	84,912	84,912	0	0	0	72,867	12,045	85.8
			익산문화원 육성	162,500	162,500	0	0	0	161,062	1,438	99.1
			유통관련업소 지도단속 및 행정조치	7,000	7,000	0	0	0	5,651	1,349	80.7
		시민에게 문화예술 향수기회 제공		4,616,547	4,616,547	0	0	0	4,584,232	32,315	99.3
			익산대표 축제육성	32,100	32,100	0	0	0	32,100	0	100.0
			향교 일요학교 운영	34,832	34,832	0	0	0	34,829	3	99.9
			한국예총 익산지부 활성화	113,500	113,500	0	0	0	113,497	3	99.9
			문화예술단체 지원 활성화	1,323,450	1,323,450	0	0	0	1,295,765	27,685	97.9
			사회취약계층 문화 예술 교육 활성화	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	100.0
			통합문화체육관광 이용권	1,194,000	1,194,000	0	0	0	1,194,000	0	100.0
			생활문화예술동호회 활성화 지원	177,700	177,700	0	0	0	174,464	3,236	98.2
			전통문화 행사 지원	71,000	71,000	0	0	0	70,949	51	99.9
			전통문화 지원	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0	100.0
			문화가 있는 날 지원사업	52,000	52,000	0	0	0	51,824	176	99.7
			지역영상미디어센터 운영	450,000	450,000	0	0	0	450,000	0	100.0
			4대종교 협력사업	4,500	4,500	0	0	0	4,120	380	91.6
			주민시네마스쿨 운영	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	100.0
			2018년도 전국 (장애인)체전 운영	103,135	103,135	0	0	0	102,354	781	99.2
			익산민예총 육성	16,000	16,000	0	0	0	16,000	0	100.0
			문화예술단체 지원 (보조)	152,330	152,330	0	0	0	152,330	0	100.0
			전국(장애인)체전 문화예술행사(보조)	820,000	820,000	0	0	0	820,000	0	100.0
	관광산업 활성화			2,233,805	1,608,927	624,878	0	0	2,228,081	5,724	99.7	명시이월 598,347
		관광홍보마케팅 활성화		113,700	113,700	0	0	0	112,432	1,268	98.9
			관광홍보물 제작	49,700	49,700	0	0	0	49,599	101	99.8
			관광홍보용 기념품 제작 및 구입	50,000	50,000	0	0	0	48,833	1,167	97.7
			관광안내체계구축 (다국어관광 안내지도 제작)	14,000	14,000	0	0	0	14,000	0	100.0
		관광객 유치 활성화		1,662,668	1,037,790	624,878	0	0	1,661,527	1,141	99.9	명시이월 598,347
			아시아태평양도시관광진흥기구(TPO) 공동사업	20,800	20,800	0	0	0	20,800	0	100.0
			금강권관광 공동사업	31,200	31,200	0	0	0	30,757	443	98.6
			전라북도관광 공동사업	35,790	35,790	0	0	0	35,092	698	98.0
			관광객유치여행사 인센티브 지원	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	100.0
			중저가 숙박시설 개선 지원사업 및 대형음식점 시설개선 지원사업	162,000	60,000	102,000	0	0	162,000	0	100.0
			충남권 핵심관광지 육성	1,246,378	880,000	366,378	0	0	1,246,378	0	100.0	명시이월 598,347
			문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업(보조)	19,000	0	19,000	0	0	19,000	0	100.0
			지자체 시티투어 지원(보조)	137,500	0	137,500	0	0	137,500	0	100.0
		관광안내 전문인력 양성 및 운영		457,437	457,437	0	0	0	454,122	3,315	99.3
			시티투어 운영	163,500	163,500	0	0	0	159,063	4,437	97.3
			관광안내원 운영	58,875	58,875	0	0	0	56,085	2,790	95.3
			문화관광해설사 육성	185,840	185,840	0	0	0	189,977	△4,137	100.0
			익산문화알림이 해설사 운영	49,222	49,222	0	0	0	48,997	225	99.5
	관광 기반 확충 및 관리			16,341,421	8,406,142	6,994,210	522,099	418,970	16,302,167	39,254	99.8	명시이월 5,110,414 사고이월 1,703,136 게속비이월 1,511,545
		관광자원의 조성 및 관광지 정비		16,341,421	8,406,142	6,994,210	522,099	418,970	16,302,167	39,254	99.8	명시이월 5,110,414 사고이월 1,703,136 게속비이월 1,511,545
			세트장 유지 보수 및 관리	743,625	743,625	0	0	0	740,843	2,782	99.6	명시이월 479,703
			함라한옥체험단지 조성	2,367,919	3,000	1,842,820	522,099	0	2,367,896	23	99.9	사고이월 546,266
			이웃종교 탐방길 정비사업	81,515	81,515	0	0	0	81,329	186	99.8
			관광안내소 운영	7,945	7,945	0	0	0	6,918	1,027	87.1
			관광안내체계구축 (익산 관광안내 표지판정비사업)	86,042	40,000	46,042	0	0	86,042	0	100.0
			미륵사지관광지조성	5,415,349	3,000,000	1,996,379	0	418,970	5,415,349	0	100.0	명시이월 999,640 사고이월 1,044,782 계속비이월 1,511,545
			관광지 정비사업	1,187,405	130,057	1,057,348	0	0	1,167,444	19,961	98.3	사고이월 112,088
			왕궁보석테마 대표관광지 육성사업	3,461,527	2,300,000	1,161,527	0	0	3,461,527	0	100.0	명시이월 1,873,535
			금마관광지 시설 보수사업	368,558	300,000	68,558	0	0	368,558	0	100.0	명시이월 23,401
			웅포관광지 가족단위레저시설 설치사업	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	100.0	명시이월 1,734,135
			서동테마역사공원 조성사업	787,681	0	787,681	0	0	772,406	15,275	98.1
			익산함벽정시설 정비사업	33,855	0	33,855	0	0	33,855	0	100.0
	재무활동			279,008	279,008	0	0	0	279,003	5	99.9
		보전지출		279,008	279,008	0	0	0	279,003	5	99.9
			보전지출	279,008	279,008	0	0	0	279,003	5	99.9
	행정운영경비			66,084	66,084	0	0	0	64,379	1,705	97.4
		인력운영비		40,978	40,978	0	0	0	39,286	1,692	95.9
			인력운영비	40,978	40,978	0	0	0	39,286	1,692	95.9
		기본경비		25,106	25,106	0	0	0	25,093	13	99.9
			기본경비	25,106	25,106	0	0	0	25,093	13	99.9

3. 2018 행정사무감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박 경 희	□

○ 총 5건

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	•보조금 지원사업의 효율적 추진 ▸행사 및 축제가 너무 많아 행정력이 낭비되고 있음. 격년제, 중복행사 지양, 통합행사 진행 등 효율적으로 추진할 수 있는 방안을 마련하기 바람.	▸각 행사 및 축제마다 특색이 있어 통합 추진에는 어려움이 있으나 행사를 줄여 나갈 수 있도록 노력하고 있음.
2	•문화예술의 거리 조성사업 관련 ▸주차장과 먹거리가 부족하다는 의견이 많음. 또한 2020년 아파트가 생기면 문화예술의 거리에 대한 지속가능성에 대한 의문이 있음. 문화예술의 거리를 활성화 할 수 있는 대책을 강구하기 바람.	▸거리 인근 임시주차장 운영 및 음식점 대상 임대지원사업 확대를 통한 먹거리 조성을 위해 노력하고 있으며, 익산아트센터와 근대역사관(역사문화재과), 청년문화소통공간(일자리정책과) 등 거점공간 중심의 거리 활성화를 위해 노력하겠음. ▸문체부 ‘지역문화컨설팅 지원’ 공모사업 선정에 의한 컨설팅 용역을 통해 주변여건을 반영한 장기적 활성화 방안을 마련하겠음.
3	•상급기관 감사 지적사항 및 조치결과 누락 ▸상급기관 감사 지적사항 및 조치결과를 행정사무감사자료로 요구하였는데 전부 누락되었음. 향후 누락되지 않도록 꼼꼼하게 챙기기 바람.	▸앞으로 상급기관 감사 지적사항 및 조치결과 등 행정사무감사자료가 누락되는 일이 없도록 주의를 기울여 철저히 검토하겠음.
4	•(재)익산문화재단 운영 철저 ▸우리시 출연기관인 (재)익산문화재단은 서동축제를 비롯해 많은 문화사업을 하는 기관임. 그러나 상임이사의 장기간 부재, 업무과다 등 운영에 대한 미흡한 점이 있음. 문화재단에 대한 철저한 운영을 당부함.	▸익산문화재단을 익산문화관광재단으로 개편, 대표이사제 도입하여 재단 운영의 책임성과 전문성을 강화하고, 문화와 관광을 연계한 정책개발과 사업 추진을 통해 지역 문화관광 진흥을 도모하여 시민 문화향유 기회 제공에 힘쓰겠음.
5	•서동축제 관련 ▸우리시 대표축제인 서동축제에 대한 만족도와 참여도를 높일 수 있게 다채로운 프로그램 개발, 교통문제 해결 등 발전방안에 대한 고민을 하기 바람.	▸주차 및 교통문제 해결을 위해 셔틀버스 확대 운영 (기존 셔틀버스 7대 외 읍면동 지원 버스 5대 추가 운영) ▸신축 건축물 활용 주제관 조성 및 ‘빛으로 물든 금마저’ 주제에 맞는 다양한 야간경관 설치 등 13개 신규프로그램 추가 운영

4. 2018 상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	관광마케팅계장		김재숙	□
		관광개발계장		김학성	□
		관광시설계장		이우진	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

감사기간	2017. 11. 30. ~ 12. 15.	감사기관	전라북도
지 적 사 항		조 치 결 과
• 왕궁보석테마파크 대표관광지 육성사업 소홀 - 왕궁보석테마 대표관광지 육성사업 사업계획 변경 미승인 - 2016년 칠선녀 정비사업 환경보전금 정산소홀 - 블링블링 주얼리 페스티벌 사업 등 일상감사 미실시		- 사업계획 변경 승인 및 관련 규정 준수 등 철저를 기하겠음 - 환경보전금(396천원) 환수 완료 (2018.05.08.) - 일상감사 실시(2018.3월, 8월)
• 게임산업진흥법 위반업소 행정처분 등 소홀 - 행정처분 미이행(2개소) - 과징금 운용계획 미수립		- 미키PC방 : 영업정지 10일 (2018.01.08.~01.17.) 팡팡게임랜드 : 행정처분 불가 (대표자 및 상호 변경) - 과징금 운용계획 수립(2018.02.19.)
• 행정재산 관리위탁 절차 부적정		• 함라한옥체험관 사무편람 작성비치 완료(2018.3.9.) 및 관리위탁자 선정 관련 조례 상위법령에 맞게 개정
• 2016 함라 한옥체험단지 조성공사 감독업무 소홀 - 준공기한을 넘어 공사를 진행했으므로 공사계약 지연배상금 부과		• 지연배상금(966천원) 부과 및 납부 완료(2017.12.18.)
• 공유재산의 권리보전 및 사용료 등 산정 부적정 - 보석박물관 관광안내소 건축물 등기 미등록		• 건축물 소유권 보존 등기 완료 (2018.04.24.)
감사기간	2018. 10. 30. ～ 11. 7.	감사기관	전라북도
지 적 사 항		조 치 결 과
• 미륵사지관광지조성사업 추진 부적정 - 공사 토목․조경 분야 건축 분할 발주, 용역 일시정지 부적정 추진 - 공사 발주 전 소규모 환경영향평가 미실시		- 건축, 전기, 소방, 설비 등을 일괄 발주하여 공사 추진하겠음. - 소규모 환경용역평가 진행중임.

5. 시정질문 조치 결과

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박 경 희	□
		관광개발계장		김 학 성	□

【관리번호 : 212 - 1 - 4 】

일 시	2018. 10. 17. (제212회 제1차정례회)	질문의원	김용균	답 변	시장
제 목	익산문화관광재단이 이전한 이유는			소관부서	경제관광국 (문화관광산업과)
처리결과	완 결 ( ○ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 문화예술의 거리를 활성화시키기 위해서는 익산문화관광재단은 당초 위치한 한국농어촌공사 건물에 있어야 할 것으로 생각됩니다. 그러나 최근 어떤 이유에서인지 구 동산동주민센터 건물로 이전을 하였는데 이전 사유는 무엇인지?
▣ 답 변 내 용 ◦ 기존 익산문화관광재단 사무실은 한국농어촌공사 소유 건물을 임차하여 사용하였으나, 추가인력배치로 사무실 사용이 비좁아지고, 평화지구 도시주거환경개선사업에 따라 업무상 어려움이 많아져 사무실 이전이 필요 ◦ 익산문화관광재단 사무공간의 안정적 운영을 위해 시 소유 유휴공간인 (구)동산동주민센터 건물로 사무실을 이전 ◦ 문화예술의 거리는 현재 익산아트센터를 거점으로 인력이 상주하여 거리활성화 사업을 운영하고 있으며, 익산근대역사관 조성이 완료 및 거점-3조성 추진중. 향후 거점공간 중심의 거리 활성화 사업을 위해 더욱 노력하겠음. ▣ 금 후 계 획 ◦ 익산아트센터를 중심으로 지역 예술인의 작품전시회 및 창작활동을 지원하는 익산 아트로드 프로젝트사업, 공방 강사를 활용 꿈꾸는 예술학교 운영, 상설프로그램 운영(교복체험, 버스킹, 포토존 등) 등을 통해 문화예술의 거리 활성화를 위해 노력해 나가겠음.

【관리번호 : 212 - 4 - 5 】

일 시	2018. 10. 17. (제212회 제1차정례회)	질문의원	김충영	답 변	시장
제 목	왕궁보석테마대표관광지 조성사업의 문제점			소관부서	경제관광국 (문화관광산업과)
처리결과	완 결 ( ○ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 왕궁보석테마대표관광지 조성사업의 문제점
▣ 답 변 내 용 ◦ 왕궁보석테마 대표관광지 사업은 도지사 공약사업으로 총 소요사업비는 5년간 9,500백만원이며, 그 중 국비는 3,300백만원이나, 예)미륵사지 관광지 정비사업(서부내륙권사업)처럼 국비로 내시되는 사업이 아니며, 지역발전 특별회계로 도에서 그해마다 예산을 시군에 배정하는 도 실링 예산임. ◦ ′18~′19년 공공부문 일자리 창출, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대와 4차 산업 혁명 기반 및 제반 등에 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자에 우선 투자하면서 ◦ 국가 정책상 지역 관광 사업에는 다소 소홀하게 예산이 반영되어 감소된 사유에 해당함. ▣ 금 후 계 획 ◦ 왕궁보석테마 대표관광지 사업은 ′18년 주차장 및 연결교량으로 ′18년 용역완료(행정절차이행)하였으며, ′18년 12월 공사착공하여 ′19년 10월 사업완료 할 계획에 있음. ◦ 금후 관광사업 추진에는 사업계획시 부터 재원을 확보할 수 있도록 적극 노력하겠음.

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광마케팅계장		김재숙	□
		관광개발계장		김학성	□
		관광시설계장		이우진	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	15건	18,466,157	8,494,168	9,971,989
문화예술의 거리 조성사업	2개층 연면적 300㎡ 청년창업+문화소통	989,140	373,576	615,564	공사중 (’18.9~’19.4)	사고이월 615,552
가람문학관 건립	생가일원 문학관 996㎡	366,362	38,839	327,523	건축물BF인증 (‘18. 9. 완료)
중저가숙박시설 및 대형음식점시설개선사업	1개소음식점 내・외부 시설개선	60,000	0	60,000	2018. 12월 준공
관광콘텐츠 통합지원사업	시티투어지원 문화콘텐츠접목 노후관광시설재생사업	156,500	156,500	0	2018. 6월 사업완료
충남권 핵심관광지 육성(경상·자본)	대한민국 테마여행 10선 육성사업	630,000	281,653	348,347	사업비 교부 및 추진 (2018. 9월~)	명시이월 348,347
충남권 핵심관광지 육성(인센티브)	대한민국 테마여행 10선 육성사업	250,000	0	250,000	우수권역 선정 및 추가교부 (2018. 11월~)	명시이월 250,000
세트장시설보강	바닥보강 및 소법정,망루조성	683,517	203,814	479,703	2019.3월 준공	명시이월 479,703
이웃종교탐방길 정비사업	탐방길정비	50,000	49,690	310	2018.10월 준공
함라 한옥체험단지 조성사업	전통 문화ㆍ음식체험관 2동, 노소화장실 1동	2,360,139	1,813,873	546,266	2019.4월 준공	사고이월 546,266
관광지정비사업	백제전통건축(167㎡)캠핑장 운영관리	1,087,384	975,236	112,148	2019.4월 준공	사고이월 112,088
미륵사지 관광지 조성사업	관광지 조성108,743㎡	5,415,349	1,859,382	3,555,967	토지보상 문화재발굴및 관광지조성사업추진	명시이월 999,640 사고이월 1,044,782 계속비이월 1,511,545
대표관광지 (보석테마관광지) 육성사업	생태습지공원(주차장,교량)설치사업및 행사비	3,461,527	1,573,452	1,888,075	2019.10월 준공	명시이월 1,873,535
웅포관광지가족단위레저시설 설치사업	곰개나루정비 (벽천폭포,어린이놀이시설설치등)	1,800,000	65,865	1,734,135	2019.10월 준공	명시이월 1,734,135
서동테마역사공원조성사업	서동테마역사 공원정비	787,681	757,131	30,550	2018.12월 준공	집행잔액(국50%,시50%)
금마관광지 시설보수	관광지보수정비	368,558	345,157	23,401	2019.4월 준공	명시이월 23,401

7. 2018각종 민원(진정, 건의, 청원) 접수 및 처리내역

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광마케팅계장		김재숙	□

▣ 민원 접수처리 현황

(단위 : 건수)

구 분 계	진 정	질 의	요 청	청 원	건 의
6	0	0	2	1	3

▣ 민원 접수처리 내역

종류	건 명	민원인	요 구 내 용	처 리 내 용
건 의	고향역 관련 건의	김명환	고향역 관련 회의 참석 출장명령서 및 출장여비 공개 요청	보존기간 만료 및 출장여비 지출 없음 안내
건 의	문화예술계 블랙리스트 작성 관련	김명환	문화예술계 블랙리스트 작성여부 등 공개 요청	블랙리스트 작성한 적이 없음을 안내
건 의	익산그랜드투어 관련 정보공개 요청	김명환	익산그랜드투어 회의내용 및 참가자 숫자 공개 요청	자료가 없음을 안내
요 청	고향역 관련 정보 공개요청	김명환	고향역 설치 관련 민원서류 및 고향역 관련 책자 등 자료 공개 요청	자료가 없음을 안내
요 청	고향역 관련 정보 공개 요청	김명환	고향역 기념비 설치 신청서 사본 및 고향역 가요제 지원내역 및 민원제기에 따른 민원처리내용 공개 요청	고향역 기념비 설치 신청서 정보 부존재 알림 및 고향역 콘서트 지원내역 및 민원처리내용 안내
청 원	가람시조문학상 운영 방식 개선에 관한 의견 제시	이용호	가람시조문학상의 공정한 응모 기회 제공, 작품 제출 방법, 심사위원 구성, 심사방법, 이의제기 기회 부여 등 운영 방식에 관한 의견 제시	향후 가람시조문학상 규칙 제정을 통해 세부 운영 방안을 마련할 계획으로 민원인이 제시하여 주신 의견 참고하여 공정하고 권위를 인정받는 문학상이 되도록 노력할 것임을 안내

8. 기금 운용 관련사항

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

해 당 없 음

9. 위원회(자문위원회 포함)운영 관련

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

□ 각종 위원회 설치 및 운영현황

(단위 : 명, 천원)

위원회명	설치근거	구성 인원	임기	연임 제한	운영횟수			수당지급현황
					계	대면	서면	예산액	지급액	불용액
익산시축제 심의위원회	익산시 축제 육성 및 지원 조례	15	2년	없음	2	1	1	2,100	2,100	0
가람시조 문학상운영위원회	익산시 가람시조문학상 운영조례	11	2년	1회	1	1	0	5,400	0	5,400
익산영상 미디어센터 운영위원회	익산공공영상미디어센터 설치 및 운영 조례	9	3년	없음	4	4	0	1,960	1,400	560

○ 익산시축제심의위원회

직위	소속	소속기관 직위	성명	위촉일	임기	비고
위원장	익산시	익산시장	정헌율	2018.07.01.	재직기간	당연직
위 원	익산시	문화산업국장	이상춘	2018.07.13.	재직기간	당연직
〃	익산시	농업기술센터소장	신성룡	2018.07.13.	재직기간	당연직
〃	익산시의회	의원	박종대	2018.03.05.	2년
〃	익산시의회	의원	김충영	〃	〃
〃	금강방송	기자	경성원	〃	〃
〃	여성단체협의회	회장	신혜경	〃	〃
〃	익산희망연대	사무국장	이진홍	〃	〃
〃	전)인천관광공사	사장	김길건	〃	〃
〃	예원예술대학교	교수	문윤걸	〃	〃
〃	익산연극협회	협회장	이도현	〃	〃
〃	전)관광두레	PD	이광현	〃	〃
〃	원광대학교	링크사업단원	이희수	〃	〃
〃	원광대학교	교수	박윤점	〃	〃
〃	전)주얼팰리스	협의회장	정춘호	〃	〃

○ 가람시조문학상운영위원회

직위	소속	소속기관 직위	성명	위촉일	임기	비고
위원장	익산시	부시장	박철웅	2018.07.06.	재직기간	당연직
위 원	익산시	문화산업국장	이상춘	2018.07.13.	재직기간	당연직
〃	한국시조시인협회	이사장	민병도	2017.04.24.	2년
〃	한국시조시인협회	前부이사장	백이운	〃	〃
〃	한국문인협회	익산지부장	이순자	〃	〃
〃	경기대학교 국문과	교수	이지엽	〃	〃
〃	가람기념사업회	회장	양점숙	〃	〃
〃	한국문인협회	부이사장	한분순	〃	〃
〃	한국문인협회	시조분과회장	권갑하	〃	〃
〃	전북대학교 국어국문학과	교수	구종남	〃	〃
〃	전북문인협회	前부회장	김형중	〃	〃

○ 익산영상미디어센터운영위원회

직위	소속	소속기관 직위	성명	위촉일	임기	비고
위원장	익산희망연대	대표	탁제홍	2017.07.05.	3년
위 원	우석대학교 신문방송학과	교수	김은규	〃	3년
위 원	전북민주언론 시민연합	정책실장	박 민	〃	3년
위 원	전북청소년상담복지센터	센터장	정경아	〃	3년
위 원	익산시의회	산업건설위원회부위원장	한상욱	〃	3년
위 원	익산참여자치연대	시민사업국장	황인철	〃	3년
위 원	(사)농촌이민 여성센터	이사	김인선	〃	3년
위 원	솜리아이쿱소비자생활협동조합	이사장	김진경	〃	3년
위 원	익산시	문화관광산업과장	김형훈	재직기간	재직기간

10. 용역사업 관련

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광개발계장		김학성	□
		관광시설계장		이우진	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

□ 사업조서

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	용역업체	용역비	계약방법	추진사항
계	26개 사업		1,775,241
기술용역	익산 문화원 지하실 보수 건축설계용역	㈜맥건축사 사무소	5,264	수의계약	완료 (2018.03.21.)
기술용역	2017함라 한옥체험단지 조성(전기감리 용역)	남양기술감리단	5,976	수의계약	완료 (2018.10.29.)
기술용역	함라 한옥체험단지 노소화장실 증축 설계용역	진건축사사무소	25,237	수의계약	완료 (2018.08.20.)
기술용역	함라 한옥체험단지 전통담장길 조성 실시설계 용역	(주)동운	19,546	수의계약	완료 (2018.08.20.)
일반용역	문화예술의거리 경관개선 설계 및 제작설치 용역	시뱅크디자인컨설팅	191,600	일반경쟁	완료 (2018.08.30.)
기술용역	가람문학관(시조)건립 BF본인증 용역	환경그룹 건축사사무소청	8,415	수의계약	완료 (2018.09.14.)
기술용역	서동공원 백제무왕 광장조성(건설폐기물처리용역)	(유)다일환경산업	10,411	일반경쟁	완료 (2018.09.27.)
기술용역	문화예술의거리(거점-3, 거리경관개선) 설계용역	환경그룹건축사사무소청	47,499	일반경쟁	완료 (2018.10.15.)
기술용역	2017함라 한옥체험단지 조성(건축감리 용역)	미건축사사무소	21,848	수의계약	완료 (2018.10.29.)
기술용역	문화예술의거리 거점-3 조성사업 폐기물처리용역	(유)진영환경	6,812	수의계약	진행중 (‘18.10~’19.4)
기술용역	문화예술의거리 거점-3 조성사업 감리용역	건축사사무소.대지	8,133	수의계약	진행중 (‘18.10~’19.4)
기술용역	교도소세트장 시설보강공사 실시설계용역	J-us건축사사무소	28,018	일반경쟁	완료 (2018.10)
기술용역	교도소세트장 시설보수공사 실시설계용역	온건축사사무소	8,969	수의계약	완료 (2018.10)
기술용역	함라 한옥체험단지 전통담장길 조성사업 폐합성수지 처리용역	(주)이리위생공사	4,715	수의계약	진행중 (‘18.11~’19.5)
기술용역	함라 한옥체험단지 전통담장길 조성사업 폐기물 처리용역	(주)일진도시환경	7,487	수의계약	진행중 (‘18.12~’19.6)
기술용역	미륵사지관광지조성사업소규모환경영향평가	㈜천마종합건설	80,161	경쟁입찰	진행중 (‘18.12~’19.5)
기술용역	미륵사지지구 관광지 기반 시설공사기본및실시설계	㈜서영엔지니어링	223,682	경쟁입찰	진행중 (‘18.6~’19.5)
기술용역	미륵사지조성사업 지정폐기물처리용역	일진도시환경	14,463	수의계약	완료 (‘18.8~’19.1)
기술용역	미륵사지조성사업지장물철거폐기물처리용역	(유)도시환경산업	184,322	경쟁입찰	진행중 (‘18.9~’19.4)
기술용역	미륵사지관광지사업장 생활계폐기물처리용역	㈜이리위생공사	19,404	수의계약	완료 (‘18.8~’19.2)
기술용역	미륵사지관광지조성사업기본계획및실시설계용역	㈜한국종합기술	531,000	경쟁입찰	진행중 (‘18.4~’19.4)
기술용역	웅포관광지 조성계획 (변경)및실시설계용역	㈜우향이엔씨	140,459	경쟁입찰	완료 (‘18.3~’18.12)
기술용역	18년왕궁보석테마 대표관광지 실시설계용역	제이씨엔(주)	105,670	경쟁입찰	완료 (2018.11.12.)
기술용역	왕궁보석테마 대표관광지 육성사업 기본계획변경 수립용역	㈜동운	45,524	경쟁계약	진행중 (‘18.5~’19.5)
기술용역	왕궁보석테마대표관광지 정비사업 폐기물처리	㈜류한환경	11,048	수의계약	진행중 (‘18.11~’19.10)
기술용역	2018금마관광지시설보수사업실시설계용역	㈜우향이엔씨	19,578	경쟁입찰	완료 (2018.5.25.)

11. 인․허가 민원처리 관련사항

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	관광시설계장		이우진	□

□ 사업조서

○ 근  거 : 관광진흥법 제4조(등록)

○ 내  역

업종	사업자	사업장 소재지	대지 면적 (㎡)	연면적 (㎡)	객실	규모	부대시설	등록일
관광 숙박업 (관광 호텔업)	(유)웨스턴라이프컨소시엄 (대표 정해성)	영등동 191-1외 14필지	19,517	17,667	155실	지하2층~지상12층	피트니스 레스토랑 스파 연회장 BAR 미용실 커피숍	2018. 9. 21.

12. 각종 공사 설계 변경상황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광개발계장		김학성	□
		관광시설계장		이우진	□

(단위 : 천원)

일 자	사업명	계약액	변경액	증 감	계약자	공사기간	변경사유등
계	18 건	7,328,180	7,894,365	566,185
2018.03.20	서동공원 백제무왕 광장조성사업 건축공사	963,059	1,009,704	46,645	㈜창주 메이크 종합건설	2017.10.19. ~2018.10.02	가설울타리 반영,기초공법변경 (파일⇒줄기초)
2018.04.25	17년 왕궁보석테마 대표 관광지(함벽정 및 수변정 정비사업)	317,628	386,848	69,220	(유)서도종합건설	2017.11.02. ~2018.06.10	데크선현변경 및 식재수목변경 등
2018.05.08	서동공원 백제무왕 광장조성사업 전기공사	33,754	46,330	12,576	㈜포올이앤씨	2017.10.26. ~2018.10.02	와외 분전반 3개소 추가
2018.05.24	익산문화원 지하실 보수공사	42,130	47,510	5,380	(유)지웅 건설	2018.04.18. ~2018.05.12.	배수펌프교체, 현관계단 파손 화강석정비
2018.07.09	2018년금마관광지 시설보수공사	120,707	140,349	19,642	대진종합건설	2018.04.09. ~2018.07.25	정자추가보수 및 산책로정비 등
2018.07.13	서동공원 백제무왕 광장조성사업 건축공사	1,009,704	1,065,993	56,289	㈜창주 메이크 종합건설	2017.10.19. ~2018.10.02	안전휀스 기단전면계단추가
2018.08.23	2017함라 한옥체험단지 조성사업(건축공사)	1,229,022	1,296,383	67,361	㈜바른 종합건설	2017.09.19. ~2018.09.19.	지하배수관로 (Φ1200) 이설 등
2018.08.28	2017함라 한옥체험단지 조성사업(전기공사)	74,615	81,091	6,476	(유)한미전기공사	2017.09.18. ~2018.10.14.	가로등 선로정비 등
2018.09.18	서동공원 백제무왕 광장조성사업 건축공사	1,065,993	1,057,106	△8,887	㈜창주 메이크 종합건설	2017.10.19. ~2018.10.02	우물천정추가 보험등경비정산
2018.09.18	2017함라 한옥체험단지 조성사업(건축공사)	1,296,383	1,377,937	81,554	㈜바른 종합건설	2017.09.19. ~2018.10.14.	마루형식변경 (강화⇒전통마루) 전통담장추가
2018.10.04	2017함라 한옥체험단지 조성사업(통신공사)	24,003	32,287	8,284	삼성정보통신	2017.09.19. ~2018.10.14.	CCTV카메라 4개소 추가
2018.10.19	문화예술의거리 건물외관 복원개선사업	58,022	78,779	20,757	㈜성민 종합건설	2018.05.17. ~2018.12.03	플라스틱 기와 추가 등
2018.11.09	서동테마역사공원조성사업(토목조경)	226,282	254,489	28,207	명진토건(주)	2018.06.26. ~2018.12.10.	평때추가식재및 수목추가 식재 등
2018.11.19	문화예술의거리 거점-3 조성사업 통신공사	20,548	21,465	917	㈜천성 정보통신	2018.09.27. ~2019.02.27.	사무실 바닥 통신선로 추가
2018.11.19	미륵사지관광지조성사업 지장물철거공사	118,765	143,708	24,943	(유)수정건설환경	2018.08.30. ~2019.04.08.	폐기물수량증가(432.8㎥)
2018.11.23	미륵사지관광지조성사업 지정폐기물철거공사	66,870	71,341	4,471	㈜현승 종합개발	2018.08.30. ~2019.04.08.	슬레이트 수량증가(129㎡)
2018.11.30	문화예술의거리 거점-3 조성사업 건축공사	469,843	563,365	93,522	㈜시온 종합건설	2018.09.28. ~2019.04.26.	연약지반으로 기초형식 변경 (온통⇒파일기초)
2018.12.03	함라 한옥체험단지 노소화장실 증축공사	190,852	219,680	28,828	㈜진석 종합건설	2018.09.29. ~2019.02.25.	화단조성으로 자연석쌓기 추가

13. 건설공사 집행현황(3천만원 이상)

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광개발계장		김학성	□
		관광시설계장		이우진	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	18 개 사업	7,421,313	4,856,730	2,564,583
익산 문화원 지하실 보수공사	지하실 138㎡, 내부 리모델링	47,510	47,510	0	2018.04.18. 착공 2018.05.12. 준공
서동공원 백제무왕 광장조성 사업 (전기공사)	백제전통건축 전망대 및 무대 (2개층 125㎡)	54,154	54,154	0	2017.10.26. 착공 2018.10.02. 준공
서동공원 백제무왕 광장조성 사업 (건축공사)	백제전통건축 전망대 및 무대 (2개층 167㎡)	1,029,600	1,029,600	0	2017.10.19. 착공 2018.10.02. 준공
세트장시설보강	바닥보강 및 소법정,망루조성	683,517	203,814	479,703	2018.10.29. 착공 2019.03.23. 준공
이웃종교탐방길 정비사업	탐방길정비	50,000	49,690	310	2018.09.03. 착공 2018.10.24. 준공
2017함라 한옥체험 단지조성(통신공사)	문화체험관 A=191㎡ 음식체험관 A= 211㎡	31,532	31,532	0	2017.09.19. 착공 2018.10.14. 준공
2017함라 한옥체험 단지조성(전기공사)	문화체험관 A=191㎡ 음식체험관 A= 211㎡	77,045	77,045	0	2017.09.18. 착공 2018.10.14. 준공
2017함라 한옥체험 단지조성(건축공사)	문화체험관 A=191㎡ 음식체험관 A= 211㎡	1,324,818	1,324,818	0	2017.09.19. 착공 2018.10.14. 준공
왕궁보석테마관광지(칠선녀 광장 통신공사)	영상음향장비 및 통신설비	161,047	161,047	0	2018.07.24. 착공 2018.11.11. 준공
보석숲 일대 수목정비 및 초화식재공사	잡목제거 및 수목전정8,060㎡ 구절초68,500본	157,641	157,641	0	2018.01.19. 착공 2018.05.02. 준공
화석전시관 옆 공룡놀이시설 정비공사	놀이시설4종	93,722	93,722	0	2018.01.16. 착공 2018.05.18. 준공
미륵사지관광지조성사업(토목조경)	관광지조성A=82,448㎡	1,918,051	440,000	1,478,051	2018.12.05. 착공 2021.12.04. 준공
미륵사지관광지지정폐기물철거공사	지정폐기물철거 A=1,837㎡	71,341	71,341	0	2018.08.14. 착공 2018.12.17. 준공
미륵사지관광지조성사업지장물철거공사	구조물헐기1,794㎥ 철근콘크리트978㎥	143,708	143,708	0	2018.08.30. 착공 2019.04.08. 준공
왕궁보석테마대표관광지(경관교량,주차장정비사업)	공공주차장 A=19,000㎡ 연결교량L=45m	976,519	370,000	606,519	2018.12.17. 착공 2019.10.16. 준공
금마관광지 시설보수공사	장애인이동경사로 정자보수 산책로재포장	140,349	140,349	0	2018.04.06. 착공 2018.07.25. 준공
서동테마역사공원조성사업(건축기계)	화장실신축 A=83.13㎡	207,875	207,875	0	2018.07.02. 착공 2018.11.20. 준공
서동테마역사공원조성사업(토목조경)	산책로포장A=1,746㎡, 관목및잔디식재	252,884	252,884	0	2018.06.26. 착공 2018.12.10. 준공

14. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광마케팅계장		김재숙	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

(단위 : 천원)

단 체 명	사 업 명	예 산 액	집 행 액	잔 액	비고
합 계	126개 단체 / 165개 사업	3,442,712	3,434,325	8,387
익산문화관광재단	시군 대표축제 육성 지원	30,000	30,000	0
	문화예술의거리 조성 지원	350,000	350,000	0
	전국(장애인)체전 문화예술행사	550,000	550,000	0
익산문화원	제37회 전북 시군대항 농악경연대회 출전	4,500	4,500	0
	제17기 문화학교 운영지원	11,600	11,600	0
	익산문화원 사업 활동 지원	44,000	43,401	599
	익산문화원 경상운영비	79,000	79,000	0
W미술관	사립미술관 문화사업 지원	24,000	24,000	0
충간공보물제651호 박물관	박물관 문화사업 지원	5,000	5,000	0
원불교역사박물관	박물관 문화사업 지원	5,000	5,000	0
(사)익산국악진흥원	익산국악진흥원 후계자양성 강사수당	34,000	34,000	0
	국창 정정렬추모 제18회 익산전국판소리 경연대회	42,000	41,800	200
	시민과 함께하는 소리여행	5,000	5,000	0
(사)대한시조협회 익산시지부	대한시조협회익산시지부 후계자양성 강사수당	18,000	18,000	0
	제22회 전국 정가 경창대회	6,000	6,000	0
(사)한국판소리보존회 익산지부	우리소리보존과 대중화를 위한 교육	18,000	17,999.98	0.02
	해설 있는 판소리 천일야화	3,650	3,650	0
가람시조문학회	가람시조 제14집 발간	2,000	2,000	0
가람기념사업회	제10회 가람시조문학제	20,000	20,000	0
	가람시학 제9호 발간	3,000	3,000	0
여산지편찬위원회	여산지 편찬사업	20,000	20,000	0
솜리문학회	문학회작품집발간	1,500	1,500	0
익산시조문학동호회	시조집발간	1,500	1,500	0
여산향교	여산향교지제작	10,000	10,000	0
이리농악보존회	고 계림 김형순선생님 유고집발간	5,000	5,000	0
(사)한국공예 문화협회	2018 제19회 익산 한국공예대전 전국공모전	80,000	80,000	0
	2018 한국현대공예 원로정예 작가 10인전	20,000	20,000	0
(사)한국무용협회 익산시지부	제10회 서동춤 전국제전	4,000	4,000	0
	문화가 있는 날 프로그램 “전국체전 개최를 위한 한마당 춤”	6,500	6,500	0
익산국악관현악단	해금콘서트	3,000	3,000	0
익산시서예가 연합회	제12회 대한민국 마한 서예 문인화대전 및 초대 작가전	33,000	33,000	0
(사)한국연예예술인협회 익산지부	제14회 한여름밤의 콘서트	13,000	13,000	0
	동면민과 함께 하는 대중 예술 공연	15,000	15,000	0
	2018 제3회 마한 전국가요제	70,000	69,000	1,000
익산한마음 음악봉사단	시민과 함께 하는 한마음 음악콘서트	7,000	7,000	0
	제7회 시민과함께하는 한마음콘서트	8,000	8,000	0
낭산다례원	제16회 향기 있는 가을찻자리	5,500	5,500	0
(사)환경미술협회 익산지부	제13회 환경미술협회 익산지부전	1,000	1,000	0
(사)한국서가협회 익산지부	제11회 한국서가협회 익산지부전	1,500	1,500	0
익산불교사암 연합회	익산 시민을 위한 연등축제	30,000	29,952	48
(사)한국미술협회 익산지부	스케치전	3,000	3,000	0
(사)서동우리가락 연구진흥원	제13회 서동국악의 향연	3,600	3,600	0
(사)한국예총 익산지회	제11회 서동청소년가요제	13,000	13,000	0
	2018 익산예술인 한마당	5,000	5,000	0
	제50회 익산예술제 지원	90,000	89,997	3
	한국예총 익산지회 운영비	23,500	23,500	0
전라아리랑 팝오케스트라	제69회 색소폰 STORY	2,500	2,500	0
(사)익산성당포구 농악보존회	제10회 익산성당포구농악 복원 및 보존활성화 정기발표회	5,000	5,000	0
국악예술단 소리연	2018 국악페스티벌 소리 연악무	2,000	2,000	0
	문화가 있는 날 프로그램 “소리연 樂 페스티벌”	3,000	3,000	0
익산필하모닉 오케스트라	정기연주회, 기획 연주회 및 찾아가는 음악회	30,000	30,000	0
(사)대한장기협회 익산지부	제17회 익산시장배 장기대회	4,800	4,800	0
국악예술원 소리뫼	추석맞이 국악마당 이래도흥 저래도흥	10,000	10,000	0
	각설이뎐5	5,000	5,000	0
	문화가 있는 날 프로그램 “송년국악콘서트 藝樂益山”	7,000	7,000	0
익산예우회	추석맞이 효노래한마당	10,000	10,000	0
아트회	2018아트전 및 익산청소년 미술전	4,500	4,500	0
삼동청소년회	제15회 아하데이 나눔페스티벌	70,000	70,000	0
익산색소폰앙상블	익산 시민을 위한 색소폰연주회	2,000	2,000	0
	익산시민과 함께하는 색소폰과 국악의 만남 음악회 사업	5,000	5,000	0
한국공연문화 예술연구소	2018 너와 친구가 되어 줄게 ArtPowerFriends 5. 꿈의날개	2,000	2,000	0
음악친구	행복한 익산 어울림한마당	5,000	5,000	0
대한적십자사 익산지구협의회	2018 희망풍차 한마음 문화예술 행사	4,000	4,000	0
호연회	익산시민과 함께하는 호연회 콘서트	4,500	4,500	0
(사)한국사진작가 협회 익산지부	제10회 익산 사계절관광 전국사진공모전	26,000	26,000	0
	익산 천만송이 국화축제 촬영대회	10,000	10,000	0
	익산 전국(장애인)체전 촬영대회	8,000	8,000	0
서동역사영상 연구회	2018 익산의 모습을 기록하다	5,000	5,000	0
국악중심 연 익산시지부	연과 함께하는 도심풍류	3,000	3,000	0
구간도실	익산사랑콘서트	20,000	20,000	0
솜리색소폰봉사단	2018 익산 동네방네 노래자랑	5,000	5,000	0
익산목발노래보존회	함열현감 순력 행차재현	7,000	7,000	0
어울림음악봉사단	어울림 음악단과 함께 하는 사랑과 평화 공연	5,000	5,000	0
필통아트홀	찾아가는 가을 작은 음악회	5,000	5,000	0
	2018 해와달 축제	15,000	15,000	0
웅포면축제 추진위원회	제4회 웅포벚꽃우어축제	25,000	25,000	0
(사)대한노인회 익산시지회	백제의 고도 익산 단오축제	4,800	4,800	0
(사)국제티클럽	2018 익산티엑스포	33,000	33,000	0
대한불교조계종 심곡사	2018 떡목음악회 가을이 오는 소리	25,000	25,000	0
원광대 문화재보존수복연구소	익산금석문 탁본전시 및 탁본집 간행	40,000	40,000	0
(사)익산시교향악단	익산시 교향악단 정기연주회 및 특별연주회	150,000	150,000	0
(사)마한민속예술 제전위원회	백제 무왕 익산천도 입궁행렬	45,000	45,000	0
	마한소도제 재현	10,000	10,000	0
솜리골 아카데미	익산역 콘서트	30,000	30,000	0
	함라 한옥마을 상설공연	30,000	30,000	0
전북통기타음악협회	The Love 통기타 작은 음악회	5,000	5,000	0
찾아가는 음악아트 봉사단	음악아트 새봄맞이 가요사랑 콘서트	5,000	5,000	0
	음악아트 가요사랑 콘서트	3,000	3,000	0
벨라누르무용단	아름다운 빛 콘서트	3,980	3,980	0
장터울림 난타	흥과 즐거움이 있는 난타 공연	2,000	2,000	0
익산시민음악회	2018 전국체전 성공기원 익산시민 화합콘서트	20,000	20,000	0
	요양원, 노인시설, 장애인시설, 정착촌 등 위문공연	5,000	5,000	0
(사)운초오정숙 판소리보존회 익산지부	제13회 시민과 함께하는 국악공연	5,000	5,000	0
	제10회 국창 오정숙 추모공연	14,000	14,000	0
호남향토문화음악발전협회	시민과 함께하는 향토문화음악발표축제	5,000	5,000	0
인형극단 아리아리	익산문화산책 공감	38,000	38,000	0
우정음악단	우정음악단과 함께하는 사랑과 우정 공연	2,000	2,000	0
삼기농요보존회	삼기농요 공연	3,000	3,000	0
(사)대한기자협회 전북협회	2018 익산시민을 위한 가을밤의 콘서트	10,000	10,000	0
	내고향 익산가요제	10,000	10,000	0
(사)한국석조각예술인협회 호남지회	제7회 한국석조각 예술인협회 호남지회전	3,000	2,958	42
힐링매직예술단	Healing Magic과 함께하는 사랑의 마술 콘서트	8,000	8,000	0
갈산전통문화원	시민과 함께하는 나눔 음악회 (제1회 공양미 콘서트)	2,360	2,360	0
펠리체챔버오케스트라	龤,어울림-장애인과 함께하는 사랑나눔콘서트	2,360	2,360	0
(사)한국 백제문화민속예술연합회	이리역 폭발사고희생자 위령제	2,380	2,380	0
한국희망나눔연합회	2018 해피매직 축제	10,000	10,000	0
NCC뮤비스	NCC뮤비스 정기공연 및 특별공연/교육, 특강	10,000	8,817.51	1,182.49
꿈초롱인형극단	2018 익산 천년 문화 페스티벌	10,000	10,000	0
(사)한국국악협회 전라북도지회	제36회 전국국악대전 및 제37회 전북 시군 농악경연대회	30,000	30,000	0
전라북도수석인 연합회	창립33주년 제31회 전라북도수석인연합회 회원전	20,000	20,000	0
드림합창단	익산 문화소리의 밤	10,000	9,987.6	12.4
(사)한국애견연맹 익산지회	익산반려동물문화축제	5,000	5,000	0
은빛실버문화 예술협의회	2018시민과 함께하는 추억의 가요 콩쿨대회	3,000	3,000	0
연꽃문화진흥원	연화 당산제 및 문화예술 공연 행사	5,000	5,000	0
사람이좋다 나눔이좋다	사람이좋다 나눔이좋다 공연	4,800	4,800	0
	열린가요 나눔한마당	5,000	5,000	0
중앙시장 상인회	노래자랑 및 장기자랑	3,550	3,550	0
한국문화예술협회	이웃과함께 아름다운 우리가락으로 성공체전	5,000	5,000	0
익산색소폰오케스트라	제7회 색소폰 정기연주회	5,000	5,000	0
비영리 익산실버 건강문화운동연맹	장기동호인 대회	5,000	5,000	0
익산사우회	익산사우회 제22회 사진전시회	3,000	3,000	0
(사)한국예총 전북연합회	제57회 전라예술제	100,000	100,000	0
(사)한국예술문화단체총연합회	예술문화대제전	270,000	270,000	0
익산민예총	익산민예총운영비	16,000	16,000	0
(사)익산여성의전화	솜리골이야기지킴이의 동화구연 활동사업	13,450	13,450	0
헵시바예술연구소	소외계층과 함께하는 퓨전예술공연	2,800	2,800	0
익산실버음악회	노인대학, 요양병원, 장애인시설 등 위문공연	1,500	1,500	0
한국국악교육원 전북총국	복지시설 찾아가는 문화공연	2,400	2,400	0
러브하모니카	러브하모니카 노인대학 양로원 등 위문공연	1,000	1,000	0
파랑새문화예술단	동고동락 콘서트	2,800	2,800	0
솜리국악마당	찾아가는 신명과 흥	2,000	2,000	0
익산시생활문화 예술동호회	생활문화예술동호회 활성화지원	82,500	77,505	4,995
	문화기획자 양성지원	55,200	55,200	0
	생활문화예술동호회 상설공연 지원	15,000	15,000	0
	전라북도 생활문화예술동호회 페스티벌	20,000	20,000	0
익산, 여산, 용안, 함열 향교	지역향교 춘추석전대제 지원	20,000	20,000	0
	지역향교 분향제례 지원	20,000	20,000	0
	향교전통문화 전승보존 (기로연 행사)	10,000	9,949	51
	향교 일요학교 운영	34,832	34,829	3
익산‧여산향교, 용안‧함열 성균관 유도회	도덕성 회복을 위한 윤리선양대회	7,500	7,500	0
성균관유도회 익산지부	경로효친 글짓기 대회	1,350	1,350	0
	도덕성회복 인성교육	1,800	1,800	0
삼세오충열사유회	삼세오충열사 대제봉행	2,000	2,000	0
익산시향교유림연합회	성년식 및 전통 관‧계례 성년례 재현 행사	5,000	5,000	0
화산서원	화산서원 춘추대제	4,000	4,000	0
화암서원	2018 춘향봉행	1,500	1,500	0
담월사	담월사 추모제	1,000	1,000	0
은천사	은천사 춘계대제봉행	1,000	1,000	0
덕천서원	덕천서원 추모제	1,000	1,000	0
오강서원	오강서원 향사	1,000	1,000	0
백산서원	백산서원 선열 추모향사	1,000	1,000	0
충열사	충열사 추모제	1,000	1,000	0
팔봉사	팔봉사 추모제	1,000	1,000	0
단군봉성회	단군봉성회 대제지원	4,200	4,200	0
	단군사당 관리사 보수 공사	5,000	5,000	0
익산향교	익산향교 집기구입 지원	4,000	4,000	0
소담김금희 한국음악예술원	문화가 있는 날 프로그램 “소담 풍류 歌 노닐다”	3,000	3,000	0
가온스토리클래식	문화가 있는 날 프로그램 “Cla-ssic”	3,000	3,000	0
마한서각회	문화가 있는 날 프로그램 “제6회 서각과 그림각의 만남전”	2,600	2,600	0
(사)한국연극협회 익산지부	문화가 있는 날 프로그램 “제19회 영호남연극제”	10,000	10,000	0
익산윈드오케스트라	문화가 있는 날 프로그램 “제7회 익산윈드오케스트라 정기연주회”	5,000	4,749	251
(사)한국생활음악 협회 익산지부	문화가 있는 날 프로그램 “시민과 함께하는 소리동행”	6,000	6,000	0
	찾아가는 실버 문화공연	4,500	4,500	0
(사)전북장애인정보문화협회 익산지회	문화가 있는 날 프로그램 “백제의 향수, 현대국악과 앙상블과 만남”	2,500	2,500	0
해피음악봉사단	문화가 있는 날 프로그램 “추억의 7080 노래자랑 콩쿨대회”	3,400	3,400	0

15. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광마케팅계장		김재숙	□
		관광개발계장		김학성	□
		관광시설계장		이우진	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				집 행 액				잔 액	비고
	계	국 비	도 비	시 비	계	국 비	도 비	시 비
14건	18,053,616	6,537,437	2,038,278	9,477,901	9,349,352	3,542,345	1,345,638	4,461,369	8,704,264
문화예술의 거리 조성 지원	350,000		140,000	210,000	350,000		140,000	210,000	0
가람문학관 건립	366,362	64,302	0	302,060	38,839	8,415	0	30,424	327,523
통합문화 이용권 지원사업	1,194,000	869,000	88,400	236,600	1,194,000	869,000	88,400	236,600	0
예술문화 대제전	270,000		120,000	150,000	270,000		120,000	150,000	0
전국(장애인)체전 문화예술 행사	550,000		275,000	275,000	550,000		275,000	275,000	0
관광콘텐츠 통합지원 사업	250,000	125,000	0	125,000	250,000	125,000	0	125,000	0
충남권 핵심관광지육성 (자본·경상)	630,000	315,000	0	315,000	281,653	140,827	0	140,826	348,347	명시이월 348,347
충남권 핵심관광지육성 (인센티브)	250,000	125,000	0	125,000	0	0	0	0	250,000	명시이월 250,000
함라한옥 체험단지 조성	2,360,139	1,180,069		1,180,070	1,813,873	906,936		906,937	546,266	사고이월 546,266
미륵사지 관광지조성	5,415,349	1,500,000		3,915,349	1,859,382	475,036		1,384,346	3,555,967	명시이월 999,640 사고이월 1,044,782 계속비 1,511,545
대표관광지 (보석테마 관광지) 육성사업	3,461,527	914,830	1,414,878	1,131,819	1,573,452	466,938	722,238	384,276	1,888,075	명시이월 1,873,535
웅포관광지가족단위레저시설설치 사업	1,800,000	900,000		900,000	65,865	32,932		32,933	1,734,135	명시이월 1,734,135
금마관광지시설보수 사업	368,558	150,396		218,162	345,157	138,696		206,461	23,401	명시이월 23,401
서동테마 역사공원 조성사업	787,681	393,840		393,841	757,131	378,565		378,566	30,550	집핸잔액(국50%시50%)

16. 2018년도 명시 및 사고이월 사업비 집행내역

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광마케팅계장		김재숙	□
		관광개발계장		김학성	□
		관광시설계장		이우진	□

□ 명시 및 사고이월 내역 : 16건(명시15, 사고1)

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	준 공 (완료예정일)	추 진 내 역
계	9,734,866	6,984,437	2,750,429
익산문화원 지하실 보수(명시)	73,177	73,168	9	2018. 5. 12.	지하실 138㎡, 내부 리모델링
문화예술의거리 거점 및 거리경관개선(명시)	989,140	373,576	615,564	2019. 4.	2개층 연면적 300㎡ 청년창업+문화소통
가람문학관 건립(명시)	366,362	38,839	327,523	건축물BF인증 (2018. 9. 완료)	생가일원 문학관 996㎡
해공기념도서관 철거공사(명시)	165,000	91,400	73,600	2018.2.12.	철거 강제집행 완료
중저가 숙박시설 개선 지원사업(명시)	102,000	102,000	0	2018. 3.	중저가숙박시설 내외부 공사
충남권 핵심관광지 육성(경상·자본) (명시)	366,378	366,378	0	2018. 12.	보석테마관광지 미디어파사드 및 빛 광장 조성
관광콘텐츠 통합 지원사업(명시)	156,500	156,500	0	2018. 6.	시티투어, 지역축제, 노후관광시설 연계 사업
미륵사지지구 관광지 조성(명시)	1,996,379	951,597	1,044,782	2021. 12.	미륵사지관광지 사업 진행중
관광안내표지판 설치사업(명시)	46,042	46,042	0	2018. 11. 14.	관관유도표지판 금마관광지외 24개소
관광지정비사업(명시)	1,057,348	945,236	112,112	2019. 10. 2.	백제전통건축 전망대 및 무대 (2개층 167㎡)
왕궁보석테마 대표관관광지 육성사업(명시)	1,161,527	1,161,527	0	2018. 6.	사업완료
금마관광지 시설 보수 사업(명시)	68,558	68,558	0	2018. 1.	사업완료
서동테마역사공원 조성사업(명시)	787,681	757,131	30,550	2018. 12.	사업완료
익산함벽정시설 정비사업(명시)	33,855	33,855	0	2018. 3.	사업완료
함라한옥체험 단지조성 및 운영물품 구입(명시)	1,842,820	1,296,531	546,289	2019. 4.	음식체험관 소모물품(그릇 등)구입(2018.12.28.) 전통 문화ㆍ음식 체험관 2동, 노소화장실 1동
함라한옥체험 단지조성(사고)	522,099	522,099	0	2019. 4.	전통 문화ㆍ음식 체험관 2동, 노소화장실 1동

17. 2019년도 명시이월 내역

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	관광마케팅계장		김재숙	□
		관광개발계장		김학성	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

□ 명시이월내역

(단위 : 천원)

사 업 명	명 시 이월액	명시이월 사유	비 고
계 (7건)	5,708,761
충남권 핵심관광지 육성 (자본)	348,347	국고보조금 사업승인 및 교부 지연(2018년 9월)
충남권 핵심관광지 육성 (인센티브)	250,000	우수권역 선정 및 국고보조금 교부 지연(2018년 11월)
세트장 시설보강	479,703	준공시기미도래 (2019년 3월 준공)
미륵사지지구 관광지조성	999,640	사전행정절차(조성계획, 디자인심의, 지역심의)에 따른 사업 착수지연 (공사착공‘18.11)
왕궁보석테마대표관광지 육성사업	1,873,535	사전행정절차(경관심의, 문화재현상변경 등) 지연에 따른 사업 착수지연(공사착공‘18.12)
금마관광지 시설보수 사업	23,401	준공시기미도래 (2019년 4월 준공)
웅포관광지 가족단위레저시설 설치사업	1,734,135	사전행정절차(조성계획변경, 경관심의 등) 지연에 따른 사업 착수지연(공사착공‘19.1)

18. 예산전용 및 예비비 집행 현황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

해 당 없 음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광시설계장		이우진	□

사 업 명	준공기한		연 장 사 유
	당 초	변 경
서동공원 백제무왕 광장조성 사업	2017. 10. 26. ~ 2018. 7. 2.	2017. 10. 26. ~ 2018. 10. 2.	동절기 공사중지 기간반영 내부계단 변경 등 공사물량증가에 따른 기간반영
2017함라 한옥체험 단지 조성공사	2017. 9. 19. ~ 2018. 8. 21.	2017. 9. 19. ~ 2018. 9. 19.	우수 배수관(Ф1200) 이설 등 공사물량 증가에 따른 기간변경

20. 국□도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

해 당 없 음

21. 국․도비 반납 현황 및 사유(2018년도 반납건)

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광마케팅계장		김재숙	□
		관광개발계장		김학성	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

(단위 : 천원)

사업명	예산액	집행액	반납액	반납사유	비고
계	2,532,532	2,522,534	272,800
2017 생활문화예술동호회 활성화 사업	137,700	137,597	30	도비 집행잔액	시비 잔액 73
2017 제례실행사업비	20,000	19,995	5	도비 집행잔액
2017년 사립미술관 문화사업	30,000	28,400	512	도비 집행잔액	시비 잔액 768 자부담 320
2017년 향교일요학교 운영 지원사업	34,832	32,964	750	도비 집행잔액	시비 잔액 1,118
2013산업관광 육성사업 (서동마테마빌리지조성사업)	270,000	263,937	271,299	문체부 교부결정 취소 및 이자
2017 이웃종교 탐방길 정비사업	40,000	39,741	104	도비 집행잔액	시비 잔액 155
2015년~2016년 대표관광지 조성사업	2,000,000	1,999,900	100	도비 집행잔액

22. 2018년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

해 당 없 음

23. 2018년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

해 당 없 음

24. 2018년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업 현황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

해 당 없 음

25. 2018년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

(단위 : 천원)

해 당 없 음

26. 소송사건 현황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	종무콘텐츠계장		최은자	□

사 건 명	사 건 개 요	원 고	피 고	접수일	추진사항 (판․종결일)
전주지법 군산지원 2019가단50098	건물명도	익산시장	정형주	2019.01.07	진행중

27.시홈페이지 접수 민원처리 실태현황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□
		관광마케팅계장		김재숙	□
		관광개발계장		김학성	□
		관광시설계장		이우진	□
		종무콘텐츠계장		최은자	□

□ 민원접수 및 처리 현황 :  9건(시정에 바란다)

○ 익산시 서동축제 불만 폭주(2018.05.04.)

▸게시내용

• 공연 등 행사참여 차량 및 취재 차량 통제에 대한 이의 제기

▸답변내용

• 서동축제 참가에 대한 감사와 불편사항에 대한 사과말씀 전달

• 서동축제장(금마 서동공원) 접근성 및 주차문제 해결을 위한 셔틀버스 증차,

참여목적에 따른 별도 주차 공간 운영, 프로그램 참가자 대상 제한적 출입

허가 및 트럭배치 운영을 통한 사항 등 안내

○ 익산서동축제 카드사용 불편 민원(2018.05.21.)

▸게시내용

• 서동축제장 체험 프로그램 이용 카드사용 불가로 인한 불편사항 민원

▸답변내용

• 2018년 서동축제 체험프로그램 이용 편의를 위한 참여업체 카드단말기

사용 의무화 및 체험비 상한액 관리 사항 안내

• 이동식 카드단말기를 사용했던 부스 관리자의 단말기 사용 미숙으로

인한 일시적 불편 야기에 대한 사과말씀 전달

○ 두동편백나무숲 관광개발사업 요청(2018.06.09.)

▸게시내용

• 두동편백나무숲 자연환경이 너무 좋아 문화관광개발사업에 신청하여 국민관광지로 개발되어 지역경제에 큰 도움이 될듯하며, 유적지 두동교회와 연결하여 테마스토리를 만들어 관광지로 추진해 주시기 바람.

▸답변내용

• 시정발전에 애정과 관심을 가져주셔서 감사드리며 우리시의 경우 현재 4개지구의 관광개발 사업이 추진 중에 있으며, 귀하께서 건의하신 두동편백나무숲 문화관광 개발사업은 추후 문화관광 사업 추진 시 검토 하도록 하겠으며, 우리시 시정 발전을 위해 아낌없는 성원부탁 드림.

○ 익산문화예술의 거리 입주자 불친절 민원(2018.06.26.)

▸게시내용

• 문화예술의 거리 내 입주자의 고압적인 주차불가 안내에 대한 민원 제기

▸답변내용

• 문화예술의 거리는 일방통행 구간으로 주정차 불가 지역임을 안내

• 일부 입주자들의 불친절한 주정차 금지사항 안내에 대한 사과말씀 및

거리 친절운동 실시, 임시주차장 조성 등 불편사항 해결 노력 전달

○ 웅포캠핑장 시설물 이용 불편사항 및 개선요구(2018.09.16.)

▸게시내용

• 제초작업 및 전지작업, 방역 요청과 예약취소에 대한 제재방법 문의

▸답변내용

• 제초작업 및 전지작업, 방역을 9월 21일 주간 내에 완료하겠음.

• 예약 취소자에 대해서 위약금 만큼 공제한 후 환불함을 안내.

○ 익산시티투어 차량 관련(2018.10.01.)

▸게시내용

• 익산시티투어 차량 불법 무단 횡단

▸답변내용

• 익산시티투어 운영 시간 외 발생된 건 일지라도 익산시티투어 랩핑 차량은 익산시 이미지를 나타내므로 해당여행사에 즉시 연락 해당 운전기사의 교육 및 주의를 통해 차후 이런 사례가 다시금 발생되지 않도록 하였고, 익산시에서도 지속적으로 차량의 안전운행 및 교통법규를 잘 준수할 수 있도록 관리 감독을 철저히 하겠음.

○ 익산문화원 표지판(2018.11.03.)

▸게시내용

• 익산 중앙체육공원 입구 문화원 쪽 통행로 바로 옆에 있는 익산문화원 표지판이 낮고 모서리가 날카로워 위험하므로 사고위험에 대비하여 조치 요청

▸답변내용

• 익산문화원 표지판의 위치가 축제 및 행사시 관광객의 불편함을 초래할 수 있어 익산문화원에 표지판 위치를 변경하도록 조치하였음.

○ 교도소세트장 활용에 관한 질의(2018.11.12.)

▸게시내용

• 지역 협동조합이나 마을에서 세트장을 이용한 축제를 기획한다거나 마켓을 기획했을 때 지역민들의 의도대로 활용가능한지? 지역민들이 이용할 수 있는 체육시설이나 여가 공간 활용 방안에 대해 답변해 주시기 바람.

▸답변내용

• 교도소세트장은 폐교를 이용하여 영화 및 드라마 촬영 지원을 위해 조성하여 세트장내에서 축제 및 행사 개최는 조성 취지에 어긋나 사용이 불가하며, 지역에서 생산한 농산물 판매는 세부사항 등 협의가 이루어져야 할 것으로 사료됨.

• 지역민의 건강 증진 및 세트장 활성화를 위하여 세트장 주변으로 산책로를 조성할 계획이며, 교도소세트장 활성화 방안을 강구하여 지역경제에 이바지 할 수 있도록 노력하겠음.

○ 문화의거리 공사로 인한 불편함(2018.11.18.)

▸게시내용

• 문화예술의 거리 건물외관 복원 및 개선 공사로 점포입주 물품반입과 셔터공사에 지장이 있음.

▸답변내용

• 현장 협의 후 셔터공사에 지장이 없도록 공사일정을 조정하고, 빠른 시일 내 공사가 완료될 수 있도록 노력하겠음.

감사자료 과 요구사항

1. 익산문화관광재단 운영 현황

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

□ 현   황

◦ 출  범  일 : 2009. 12. 30.

◦ 예      산 : 1,875,000천원(사업비 550,000 /운영비 725,000 / 서동축제 600,000)

◦ 기구 및 정(현원) 현황 : 1국 4팀 / 25명(13명)

□ 추 진 실 적

◦ 문화재단 이사회 개최 : 6회

▸2018년 사업계획수정(안), 2018년 세입·세출예산수정(안), 2017년 결산심의(안), 기부금운용계획(안), 정관 및 규정개정(안), 추가경정예산(안), 선임직이사 공개모집(안), 대표이사 공개모집(안), 명시이월(안) 등 의결

◦ 문화예술 활성화사업 추진-------------------------------------------------------  27건

▸자체사업 추진 -------------------------------------------------------------------  16건

- 지역스토리텔링발간, 익산문화예술정책단, 익산문화포럼‘공감’, 익산예인열전, 익산학연구, 시민동아리활성화지원, 익산서동축제2018, 생활문화활성화지원, 솜리골작은미술관, 지역문화예술교류사업, 근대문화유산박물관춘포, 다이나믹익산아티스트지원, 지역문화행사활성화지원, 문화나눔메세나 장려, 문화소식지 문화in익산 발간, 익산문화알림이홍보지원

▸보조 및 위탁사업 추진  ---------------------------------------------------------- 11건

- 꿈의 오케스트라 익산, 꿈의 오케스트라 전라, 무지개다리사업, 익산문화재 야행, 지역문화전문인력양성사업, 문화로 칙칙폭폭, 마실 : 예술가의 방, 문화예술의거리 활성화, 문화특화지역(문화도시) 조성, 전국(장애인)체육대회 문화예술행사, 금강백제권역 자전거 여행상품 개발 및 운영

2. 익산서동축제2018 추진실적

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2018. 05. 04.(금) ~ 05. 07.(월) / 4일간

◦ 장    소 : 금마서동공원 및 금마면 일원

◦ 사 업 비 : 630,000천원 (도비30,000 시비600,000)

◦ 슬 로 건 : 백제의 숨결, 천년의 사랑

◦ 주    제 : 서동의 꿈! 익산의 빛!

◦ 주요내용 : 서동선발대회, 무왕퍼레이드, 무왕제례, 주제공연 등

□ 추 진 실 적

◦ 익산시축제심의위원회 개최 ---------------------------------------------- 2017. 12. 28.

▸익산서동축제2018 개최 일시․장소 등 주요사항 심의·결정

◦ 서동축제 세부프로그램 계획수립 및 준비 -------------------------- 2018. 01.~04.

◦ 익산서동축제2018 개최 --------------------------------------------------- 2018. 05.04.~07.

▸서동축제의 정체성·역사성 프로그램

- 무왕행차 퍼레이드, 무왕제례, 서동선발대회, 주제공연 천명 등

▸체험 및 참여 프로그램

- 용을 타고 백제투어, 백제무사체험, 유물발굴체험, 백제의복체험 등

▸다양한 먹거리

- 서동장터, 백제저잣거리(먹거리장터), 푸드트럭 등

◦ 익산서동축제2018 결과보고 및 발전방향 토론회 ------------------ 2018. 05. 29.

◦ 지역우수축제 벤치마킹 및 아이디어 공모전 ----------------------- 2018. 06.~11.

◦ 익산시축제심의위원회 개최 ---------------------------------------------- 2018. 11. 23.

▸서동축제2019 개최 일시․장소 등 주요사항 심의·결정

3. 문화예술의 거리 관광거점화 추진실적

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박경희	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2019.

◦ 위      치 : 문화예술의 거리(황해사(현 소망사) ~ 국빈반점 약 310m)

◦ 사  업  비 : 1,615,000천원(도비 140,000 시비 1,475,000)

▸거점 조성(1,065,000) / 경관개선(200,000) / 콘텐츠 활성화 및 임대지원(350,000)

◦ 사업내용

▸문화예술․청년창업 거점 공간 조성

▸문화예술 콘텐츠 활성화 프로그램 운영

▸문화예술분야 및 음식점 임대지원

□ 추 진 실 적

◦ 거점공간 조성 --------------------------------------------------------------- 2016. 03. ~

‣거점-1 조성 완료 : 익산아트센터(아트몰 및 창작스튜디오) 운영

‣거점-3 조성 추진 : 2019. 4. 준공 및 청년문화소통공간 운영 예정

◦ 문화예술의거리 활성화 추진

▸토요상설문화행사 : 버스킹, 아트마켓, 교복체험, 추억의 놀이 등 30여회

▸기획행사 : 월드컵 거리응원전, 무성영화제 변사극, 청춘댄스 페스티벌 등

▸거점 공간 운영 : 익산아트센터(아트몰, 전시 등), 문화복덕방(라디오방송) 등

▸경관개선 : 간판정비, 야간경관, 상징조형물, 버스정류장 정비(2018.08.29.)

4. 가람문학관 운영내역

확인자	:	문화관광산업과장		김형훈	□
작성자	:	문화예술계장		박 경 희	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 여산면 원수리 572-2 일원(가람생가 인근)

◦ 시설규모 : 지상1층 연면적 995.93㎡, 부지 3,186㎡

◦ 주요시설 : 전시관, 체험관, 문학 연구 및 세미나실, 휴게공간

◦ 운영기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

◦ 운영인력 : 3명(학예사 1, 기간제근로자 2)

◦ 사 업 비 : 84,912천원(기간제근로자 인건비 42,539, 운영비 42,373)

◦ 사업내용 : 관람객을 위한 해설안내, 교육강좌 운영, 기획전시 등

□ 운 영 실 적

◦ 문학관 유물 수집 및 관리                    : 2018. 연중

◦ 가람문학관 홍보 리플릿 제작(4,000부)           : 2018. 11.

◦ 가람 오감만남 교육 특강 운영                 : 2018. 10. 20 ~ 11. 17.

‣ 가람일기 읽기와 쓰기, 시조창작 교육(총3회, 43명 참여)

◦ 가람 관련 주요 행사 개최                     : 2018. 11. 16 ~ 11. 24.

‣ 2018 가람학술대회, 2018 가람시조문학제, 2018 가람시조 백일장

◦ 「현대시조삼인집」과 놀이가 있는 기획전시회 개최  : 2018. 11. 29 ~ 12. 15.        ‣ 2017년 발견된 「현대시조삼인집」 전시

‣ 가람문학관 기획전시 도록 제작 600부

※ 2018년 관람객수 : 5,667(월평균 473명) 2017년 1,007명(월평균 402명)

5. 익산문화원 지원내역 및 지도감독 실적

확인자	:	문화관광산업과장		김형훈	□
작성자	:	문화예술계장		박 경 희	□

□ 일반현황

◦ 창 립 일 : 1990. 8. 21.

◦ 위    치 : 익산시 선화로 529 익산문화원

◦ 사 업 비 : 162,500천원 (사업활동 지원비 등 60,100, 운영비 79,400, 자산취득비 23,000)

◦ 사업내용

▸ 지역문화의 계발 연구 조사 및 문화진흥

▸ 향토사의 조사연구 및 사료의 수집 및 보급

▸ 기타 지역문화발전에 기여할 수 있는 사업

□ 지원세부내역

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	사업비	비고
합계		162,500
사업비	제37회 전북 시‧군대항 농악경연대회 출전비	4,500
	제17기 문화학교 운영지원비	11,600
	찾아가는 문화활동	700
	취타대 육성사업	9,100
	문화답사(연2회)	5,300
	제1회 전국 나라사랑 청소년 백일장 대회	1,000
	제18기 문화대학 운영	6,800
	제2회 문화원의 날	1,650
	제15회 서동풍물 경연대회	6,050
	제21회 익산시 초중고 농악 및 사물놀이 경연대회	3,600
	제19회 성포별신제	2,900
	제1회 향토문화 심포지엄	3,900
	동지팥죽나눔	3,000
운영비	익산문화원 경상운영비(인건비, 공공요금 등)	79,400
자산취득비	야외무대 음향기기 구입	12,000
	무왕제례 제기 구입	5,000
	지하교육실 테이블, 사물함 구입	6,000

□ 지도감도 실적

◦ 문화원 운영 상황 현장 방문 점검(분기 1회)                    : 연중

◦ 문화원 지원 행사 시 현장 지도 점검 방문                        : 연중

▸ 행사 현장 방문 및 시설 점검 횟수 : 16회

◦ 보조금 정산검사(사업완료 후 즉시)                             : 연중

6. 관광객 유치를 위한 전략적 마케팅 추진실적

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	관광마케팅계장		김 재 숙	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월

◦ 대    상 : 국내․외 관광객

◦ 추진방향 : 관광관련연계사업(전라북도, 한국관광공사 둥) 국내·외 관광전 참가, 팸투어·시티투어 운영, 관광홍보물 제작 및 배부

□ 추 진 실 적

◦ 관광객 유치 홍보를 위한 팸투어 운영 --------------------------------- 6회 233명

◦ 시티투어(순환형, 테마형) 운영 ------------------------------------- 237회 8,004명

◦ 택시 관광 홍보용 포켓 설치(서동․보석․개인택시 100대) ------ 2018. 2. 14.

◦ 한국도로공사 전북본부와 업무협약 --------------------------------- 2018. 4. 19.

◦ KTX 용산역 조명광고(축제 및 시티투어) ----------------- 2018. 1. 15. ~ 11. 5.

◦ 다국어 관광안내지도 제작(80,000부) ------------------------------  2018. 9. 7.      ◦ 2018 대한민국 국제관광박람회 참가(일산 킨텍스) ------- 2018. 9. 6. ~ 9. 9.

◦ 2018 전북 트래블마트 참가	------------------------------------------------------- 2회

◦ 대한민국 테마여행 10선(핵심관광지 육성) 사업 추진

▸ 스마트 투어 가이드 플랫폼 및 공공WiFi 구축(6월 준공)

▸ 왕궁보석테마관광지․문화예술의 거리 경관 개선(12월 준공)

▸ 금강백제권 자전거 여행상품 개발 및 운영(10월 착수)

◦ 금강권관광협의회 공동 홍보관 운영(익산, 논산, 서천, 군산, 공주, 부여) ------- 6회

◦ 관광객 유치 인센티브제도 운영 ---------------------------------------- 23회 877명

◦ 보석테마관광지 상설공연·체험 운영 ------------------------------------------- 57회

◦ 관광안내 전문인력 양성 및 운영	---------------------  신규양성 9명, 교육 8회

7. 왕궁보석테마 대표관광지 육성사업 추진실적

확인자	:	문화관광산업과장		김형훈	□
작성자	:	관광마케팅계장		김재숙	□
		관광개발계장		김학성	□

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2015 ~ 2019년

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 동용리 641번지(보석박물관) 일원

◦ 사업규모 : 160,460㎡

◦ 사 업 비 : 7,150,000천원(국비1,000,000 도비4,550,000 시비1,600,000)

◦ 주요시설

▸보석광장 정비, 칠선녀광장 정비, 보석숲(함벽정 연계) 정비, 야간경관 시설, 이벤트 광장(행사무대, 조형물), 공룡테마공원 정비, 행사ㆍ축제 운영 등

※ 2018년까지 확보액(5,950,000) : 국비 1,000,000 도비 3,750,000 시비 1,200,000

□ 추 진 실 적

◦ 블링블링 주얼리 페스티벌 등 행사 추진 ----------- 2018. 04. ~ 2018. 11.

▸ 보석박물관 토요상설공연 추진 (총 57회)

▸ 상·하반기 보석대축제 문화공연 및 보석체험 부스 운영 지원 (총 2회)

◦ 화석전시관 옆 공룡놀이시설 정비공사 완료 ----------------------- 2018. 06.

▸ 어린이 놀이시설 설치, 보석숲 정비 증

◦ 생태습지공원(주차장, 연결교량)사업추진 ------------ 2018. 12. ~ 2019. 10.

▸ 생태습지공원주차장(19,000㎡), 연결교량(L=45m)

8. 미륵사지 관광지 조성사업 추진실적

확인자	:	문화관광산업과장		김형훈	□
작성자	:	관광개발계장		김학성	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2005 ~ 2021년

◦ 위    치 : 익산시 금마면 기양리, 용순리 일원

◦ 사업규모 : 108,743㎡

◦ 주요시설 : 자연지형공원, 경관녹지, 전통음식점, 광장, 주차장 등

◦ 사 업 비 : 32,498,000천원(국비5,127,000 시비25,371,000 민자2,000,000)

※ 2018년까지 확보액 : 18,800,000천원 (2017년 2,000,000천원)

□ 추 진 실 적

◦ 문화재 현상변경 조건부 허가 -------------------------------------------- 2017. 2.

◦ 미륵사지관광지조성계획(변경) -------------------------------------------- 2018. 6.

◦ 미륵사지관광지 지방재정투자 승인(조건부) ------------------------- 2018.  7.

◦ 미륵사지관광지 고도보존육성지역심의(조건부) --------------------- 2018.  9.

◦ 미륵사지관광지 조성사업 공사 --------------------------- 2018. 12. ~ 2021. 12

▸ 열린문화마당, 문화사색마당, 주차장(소형312대, 대형24대), 안내소, 화장실 등

◦ 미륵사지(2,3,4지구)문화재발굴(시굴)조사완료 ----------------------- 2019.  2.

◦ 미륵사지(2,3,4지구)문화재발굴(정밀)조사추진 --------------- 2019.  3. ~ 10.

9. 웅포관광지 가족단위레저시설 설치사업 추진실적

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	관광개발계장		김학성	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2019년

◦ 위    치 : 익산시 웅포면 웅포리 756 일원(곰개나루)

◦ 사업규모 : 58,600㎡

◦ 사업내용 : 생태놀이체험시설, 벽천폭포, 휴게정자, 기반시설 정비 등

◦ 사 업 비 : 1,800,000천원(국비900,000  시비900,000)

□ 추 진 실 적

◦ 관광지 조성계획 변경 및 실시설계용역 착수 ----------------------- 2018.  4.

◦ 조성계획 수립 관련 사전 관련 부서 협의 --------------------------  2018.  6.

◦ 전라북도 경관 심의 --------------------------------------------------------- 2018. 10.

◦ 관광지 조성계획(변경) ------------------------------------------------------ 2018. 10.

◦ 디자인 심의(익산시) --------------------------------------------------------- 2018. 11.

◦ 설계 심의 및 원가 심사 --------------------------------------------------- 2018. 12.

◦ 웅포관광지 가족단위 레저시설설치사업 ------------------------ 2019. 1. ~ 10.

10. 함라 한옥체험단지 운영내역

확인자	:	문화관광산업과장		김형훈	□
작성자	:	관광시설계장		이우진	□

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2008 ~ 2017년

◦ 위    치 : 익산시 함라면 함라교동길 25 일원

◦ 사업규모 : 41,000㎡

◦ 사 업 비 : 10,500,000천원(국비 3,250,000 시비 7,250,000)

◦ 주요시설

▸1단계(2013~2014/완료) : 주차장, 공원, 황토포장 등 부지조성

▸2단계(2015~2016/완료) : 한옥숙박동(2동), 음식점 및 찻집, 화장실 등

▸3단계(2016~2019/완료) : 홍보관, 별관숙박동(1동), 함라노소, 전통담장길, 전통문화체험관

숙박 시설			체험 시설		부대 시설
안채	사랑채	별관	전통문화	전통음식	대문채	화장실	홍보관
4실 (159.48㎡)	3실 (86.31㎡)	3실 (86.31㎡)	1동 (191.43㎡)	1동 (211.68㎡)	음식점 및 찻집 (100.8㎡)	1동 (18.6㎡)	1동 (59.22㎡)

◦ 민간위탁 : 함라한옥마을 협동조합(2017. 4. 1. ~ 현재)

□ 운영현황

구 분	운영기간	사용 객실수	수입(천원)	비 고
2017년	2017. 5. ~ 12.	180	18,198
2018년	2018. 1. ~ 12.	317	32,806

11. 건전한 영상문화 육성사업 추진실적

확인자	:	문화관광산업과장		김형훈	□
작성자	:	종무콘텐츠계장		최 은 자	□

□ 사 업 개 요

◦ 유통관련업소 현황

(단위 : 개소)

계	영화업	노 래 연습장	인터넷컴퓨터 게임 제공업	게임제공업		게 임 제작업	게 임 배급업	비디오 감상실업	복 합 유통업
				일반 게임	청소년 게 임
452	1 (9)	183	164	9	66	16	1	5	7

□ 추 진 실 적

◦ 유통관련업 등록업무 ------------------------ 153건(신규 33, 변경 105, 폐업 15)

◦ 불법행위 사전예방 교육 실시 ------------------------------------------- 2회/44명

▸게임제공업 및 노래연습장 신규, 지위승계자 교육실시

- 관련 법령 및 개정내용 안내, 준수사항, 재난안전 등

◦ 건전한 영상문화 환경 조성을 위한 행정 지도 및 단속

▸시, 익산경찰서, 익산교육청 합동지도․단속  -----------  12회 119개소

▸사행성 조장 불법 게임제공업소 게임기 압수 :  6건 / 340대(한국환경자원공사 이관)

◦ 위반업소 행정처분 내역  --------------------------------------------------- 45개소

▸등록취소 :  4개소(게임제공업 4)

▸영업정지 : 28개소/630일(노래연습장 25/480, 게임제공업 3/150)

▸과 징 금 : 12개소/10,750천원(노래연습장 2/1,500, 게임제공업 10/9,250)

▸경    고 :  9개소(게임제공업 9)

◦ 행정처분 이행여부 점검실시 ---------------------------------------- 26회 28개소

12. 익산공공영상미디어센터 운영내역

확인자	:	문화관광산업과장		김형훈	□
작성자	:	종무콘텐츠계장		최 은 자	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 인북로 424(신동)

◦ 시설규모 : 지하1층, 지상3층(연면적 1,194㎡)

◦ 운영방법 : 민간위탁(사단법인 삼동청소년회) / 개관 2009. 7.

◦ 위탁기간 : 2017. 1. 1.  ∼ 2019. 12. 31.(민간위탁금 450,000천원 / 년)

◦ 주요시설 : 전용상영관, 촬영/녹음 스튜디오, 기자재 지원실, 교육실 등

◦ 사업내용 : 영상미디어활용능력향상 교육, 영화․방송제작 실습 등

□ 추 진 실 적

◦ 상설 재미극장 운영을 통한 지역영상문화 활성화 ----------- 449회/14,224명

▸무료영화상영회, 여성영화제 등 각종 영화제

◦ 누구나 참여 가능한 열린 미디어 교육 프로그램 운영 ----- 48개과정 7,517명

▸생애단계 및 소외계층, 지역공동체 대상 맞춤식 교육

◦ 영상제작의 역량강화를 위한 지원 프로그램 운영 --------- 8개동아리 176회

▸여성·장애인·재미동 영화제 지역공동체 제작 지원 등

◦ 청소년 미디어 활용능력 배양을 위한 프로그램 육성 ----- 23개과정 4,969명

▸학교 미디어 교육, 매주 토요일 청소년 미디어 문화교실 운영

◦ TV스튜디오를 활용한 체험프로그램 운영  ------------------------- 70회 1,051명

▸익산·인근 지역 어린이집, 지역아동센터, 학교 등

◦ 우리지역 순회 찾아가는 야외 영화 상영 --------------------------------- 4회 600명

▸용안면, 이리동중학교, 중앙체육공원, 배산체육공원

◦ 영상미디어센터 장비 대여, 촬영을 위한 스튜디오 시설 제공 --- 2,955건 4,029일

◦ 시민을 위한 미디어아카이브 무료 DVD 열람  ---------------------------- 1,038명

◦ 익산공동체라디오 인터넷 방송 운영 : 28회(연애人 외 27회)

13. 교도소세트장 운영현황

확인자	:	문화관광산업과장		김형훈	□
작성자	:	종무콘텐츠계장		최 은 자	□

□ 사 업 개 요

◦ 조성현황

▸위    치 : 익산시 성당면 함낭로 207

▸규    모 : 부지 22,132㎡, 연면적 2,613㎡

▸내    용 : 정문, 담장, 망루(3), 옥사동, 교실동(2층)

▸조성연도 : 2005년

▸사 업 비 : 1,200,000천원(건축 500,000 부지 380,000 부대시설 320,000)

◦ 사 용 료 : 1일/2,000천원

□ 추 진 실 적

◦ 교도소세트장 운영현황

▸촬영편수(일수) 14편(27일), 사용료 53,000천원, 관람객 수 122,423명

◦ 교도소세트장 운영 프로그램

▸체험방 : 독방, 다인실, 면회실, 취조실, 교정본부 홍보관 등

▸체험복 : 죄수복(100벌) 무료

▸포토존 : 4개소(교도관 및 죄수)

◦ 교도소세트장 시설보강

▸시설보수 : 물받이 설치 공사, 관람로 야자매트 및 무인계측시스템 설치, 바닥보강 및 연결통로 교체

▸시설보강 : 소법정, 관람용 망루, 화장실, 주차장 확충 등

14. 문화예술단체 보조금 지급내역(Pool예산)

확인자	:	문화관광산업과장		김 형 훈	□
작성자	:	문화예술계장		박 경 희	□

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	단체명	교부액	집행액	비고
합 계		8개 분야 / 109개 사업	863,800	863,195.6
전통문화예술 육성사업 (54,000천원)		2개 사업	52,000	52,000
1	익산국악진흥원 후계자양성 교육	(사)익산국악진흥원	34,000	34,000
2	대한시조협회익산시지부 후계자양성교육	(사)대한시조협회 익산시지부	18,000	18,000
예술지, 문학지 등 발간사업 (43,000천원)		7개 사업	43,000	43,000
3	여산지 편찬 사업	여산지편찬위원회	20,000	20,000
4	문학회 작품집 발간	솜리문학회	1,500	1,500
5	가람시조 제14집 발간	가람시조문학회	2,000	2,000
6	가람시학 제9호 발간	가람기념사업회	3,000	3,000
7	시조집 발간	익산시조문학동호회	1,500	1,500
8	여산향교지 제작	여산향교	10,000	10,000
9	『굿은푸지게가락은멋들어지게』고계림김형순선생님유고집발간	이리농악보존회	5,000	5,000
전국(도)단위 참가, 행사 등 지원 (164,000천원)		5개 사업	164,000	163,800
10	제19회 익산 한국공예대전 전국공모전	(사)한국공예문화협회	80,000	80,000
11	제12회 대한민국 마한서예문인화대전 및 초대작가전	익산시서예가연합회	33,000	33,000
12	제22회 전국 정가(가사, 가곡, 시조) 경창대회	(사)대한시조협회 익산시지부	5,000	5,000
13	국창정정렬 추모 제18회 익산 전국판소리 경연대회	(사)익산국악진흥원	42,000	41,800
14	제10회 서동춤 전국제전	(사)한국무용협회 익산시지부	4,000	4,000
문화예술 전시, 공연 등 지원사업 (410,000천원)		49개 사업	388,000	387,897.6
15	해금콘서트	익산국악관현악단	3,000	3,000
16	추석맞이 효 노래한마당	익산예우회	10,000	10,000
17	2018 익산예술인 한마당	(사)한국예총 익산지회	5,000	5,000
18	제11회 전국 서동 청소년가요제	(사)한국예총 익산지회	13,000	13,000
19	2018 한국현대공예 원로정예작가 10인전	(사)한국공예문화협회	20,000	20,000
20	시민과 함께하는 향토문화음악발표축제	호남향토문화음악발전협회	5,000	5,000
21	익산시민을 위한 연등축제	익산불교사암연합회	30,000	29,952
22	제11회 한국서가협회 익산지부전	(사)한국서가협회 익산지부전	1,500	1,500
23	제17회 익산시장배 장기대회	(사)대한장기협회 익산지부	4,800	4,800
24	2018 희망풍차 한마음 문화예술 행사	대한적십자사 익산지구협의회	4,000	4,000
25	함열현감순력행차재현	익산목발노래보존회	5,000	5,000
26	제10회 익산성당포구농악 복원 및 보존활성화 정기발표회	(사)익산성당포구농악보존회	5,000	5,000
27	익산시민을 위한 색소폰 정기연주회	익산색소폰앙상블	2,000	2,000
28	2018 아트전 및 청소년 미술전시회	아트회	4,500	4,500
29	제14회 한여름밤의 콘서트	(사)한국연예예술인협회 익산지회	13,000	13,000
30	행복한 익산 어울림한마당	음악친구	5,000	5,000
31	2018 익산의 모습을 기록하다	서동역사영상연구회	5,000	5,000
32	제13회 환경미술협회 익산지부 정기전	(사)환경미술협회 익산지부	1,000	1,000
33	제13회 서동국악의 향연	(사)서동우리가락연구진흥원	3,600	3,600
34	2018너와친구가되어줄게 ArtPowerFriend5.꿈의날개	한국공연문화예술연구소	2,000	2,000
35	마한소도제 재현	(사)마한민속예술제전위원회	10,000	10,000
36	2018 익산 동네방네 노래자랑	솜리색소폰봉사단	5,000	5,000
37	2018 국악페스티벌 소리 연악무	국악예술단 소리연	2,000	2,000
38	흥과 즐거움이 있는 난타공연	장터울림 난타	2,000	2,000
39	제15회 아하데이 나눔 페스티벌	(사)삼동청소년회	70,000	70,000
40	익산문화산책 공감	인형극단 아리아리	38,000	38,000
41	익산사랑콘서트	(사)구간도실	20,000	20,000
42	찾아가는 작은 음악회	필통아트홀	5,000	5,000
43	제16회 향기있는 힐링 가을 찻자리	낭산다례원	5,500	5,500
44	우정음악단과 함께하는 사랑과 우정 공연	우정음악단	2,000	2,000
45	연과 함께하는 도심풍류	(사)국악중심 연 익산시지부	3,000	3,000
46	삼기농요 공연	삼기농요보존회	3,000	3,000
47	익산 전국(장애인)체전 촬영대회	(사)한국사진작가협회 익산지부	8,000	8,000
48	어울림 음악단과 함께하는 사랑과 평화 공연	어울림음악봉사단	5,000	5,000
49	제69회 색소폰 스토리	전라아리랑팝 오케스트라	2,500	2,500
50	익산시민과 함께하는 호연회 콘서트	호연회	4,500	4,500
51	스케치전	(사)한국미술협회 익산지부	3,000	3,000
52	2018 익산시민을 위한 가을밤의 콘서트	(사)대한기자협회 전북협회	10,000	10,000
53	요양원, 노인시설, 장애인시설, 정착촌 등 위문공연	익산시민음악회	5,000	5,000
54	제7회 한국석조각 예술인협회 호남지회전	(사)한국석조각예술인협회 호남지회	3,000	2,958
55	Healing Magic과 함께하는 사랑의 마술 콘서트	힐링매직예술단	8,000	8,000
56	시민과함께하는나눔 음악회	갈산전통문화원	2,360	2,360
57	龤,어울림-장애인과 함께하는사랑나눔콘서트	펠리체챔버오케스트라	2,360	2,360
58	이리역폭발사고희생자 위령제	(사)한국 백제문화민속예술연합회	2,380	2,380
59	제22회전국정가(가사,가곡,시조) 경창대회	사) 대한시조협회 익산시지부	1,000	1,000
60	익산문화소리의밤	드림합창단	10,000	9,987.6
61	동면민과함께하는 대중 예술공연	사)한국연예예술인협회 익산지회	5,000	5,000
62	익산반려동물문화축제	(사)한국애견연맹익산지회	5,000	5,000
63	2018시민과 함께하는 추억의 가요 콩쿨대회	은빛실버문화 예술협의회	3,000	3,000
지역대표 행사 축제 등 지원 (90,000천원)		4개 사업	87,800	87,800
64	백제의 고도 익산 단오 축제	(사)대한노인회 익산시지회	4,800	4,800
65	2018 떡목음악회 가을이 오는 소리	대한불교조계종 심곡사	25,000	25,000
66	제4회 웅포벚꽃우어축제	웅포면축제추진위원회	25,000	25,000
67	2018 익산티엑스포	(사)국제티클럽	33,000	33,000
찾아가는 문화활동 (20,000천원)		8개 사업	20,000	20,000
68	소외계층과 함께하는 퓨전예술공연	헵시바예술연구소	2,800	2,800
69	노인대학, 양로원 등 위문공연	러브하모니카	1,000	1,000
70	동고동락 콘서트	파랑새문화예술단	2,800	2,800
71	노인대학, 요양병원, 장애인시설 등 위문공연	익산실버음악회	1,500	1,500
72	복지시설 찾아가는 문화공연	한국국악교육원 전북총국	2,400	2,400
73	찾아가는 신명과 흥	솜리국악마당	2,000	2,000
74	찾아가는 실버 문화공연	(사)한국생활음악협회 익산지부	4,500	4,500
75	음악아트 가요사랑 콘서트	찾아가는 음악아트 봉사단	3,000	3,000
전통문화예술 행사 (57,000천원)		23개 사업	57,000	56,949
76	삼세오충열사 대제봉행	삼세오충열사유회	2,000	2,000
77	은천사 춘계대제봉행	은천사	1,000	1,000
78	2018 춘향봉행	화암서원보존회	1,500	1,500
79	화산서원 춘추대제	화산서원보존회	4,000	4,000
80	단군춘추대제	익산단군성조봉성회	4,200	4,200
81	도덕성 회복을 위한 윤리선양대회	성균관유도회 용안지부	1,875	1,875
82	도덕성 회복을 위한 윤리선양대회	익산향교	1,875	1,875
83	도덕성 회복을 위한 윤리선양대회	여산향교	1,875	1,875
84	도덕성 회복을 위한 윤리선양대회	성균관유도회 함열지부	1,875	1,875
85	도덕성 회복 인성교육	성균관유도회 익산지부	1,800	1,800
86	경로효친 글짓기 대회	성균관유도회 익산지부	1,350	1,350
87	오강서원 향사(추모제)	오강서원	1,000	1,000
88	덕천서원 향사(추모제)	덕천서원	1,000	1,000
89	백산서원 선열 추모향사	백산서원	1,000	1,000
90	담월사 추모제	담월사	1,000	1,000
91	충열사 추모제	충열사	1,000	1,000
92	팔봉사 추모제	팔봉사	1,000	1,000
93	기로연	용안향교	2,500	2,500
94	기로연	익산향교	2,500	2,500
95	기로연	함열향교	2,500	2,449
96	기로연	여산향교	2,500	2,500
97	익산의 소리꾼과 함께하는 판소리 천일야화	(사)한국판소리보존회 익산지부	3,650	3,650
98	제10회 국창 오정숙 추모공연	(사)운초오정숙판소리보존회	14,000	14,000
문화가 있는 날 프로그램 운영 (52,000천원)		11개 사업	52,000	51,749
99	전국체전 개최를 위한 한마당 춤	(사)한국무용협회 익산시지부	6,500	6,500
100	송년국악콘서트	(사)국악예술원 소리뫼	7,000	7,000
101	소리연 樂 페스티벌	국악예술단 소리연	3,000	3,000
102	제7회 익산 윈드오케스트라 정기연주회	익산 윈드오케스트라	5,000	4,749
103	제6회 서각과 그림각의 만남전	마한서각회	2,600	2,600
104	제19회 영호남연극제	(사)한국연극협회 익산지부	10,000	10,000
105	소담 “풍류 歌” 노닐다	소담김금희 한국음악예술원	3,000	3,000
106	Cla-ssic	가온스토리클래식	3,000	3,000
107	시민과 함께하는 소리동행	(사)한국생활음악협회 익산지부	6,000	6,000
108	백제의 향수, 현대국악과 앙상블과 만남	(사)전북장애인정보문화협회 익산지회	2,500	2,500
109	추억의 7080 노래자랑 콩쿨대회	해피음악봉사단	3,400	3,400