2019.  7.

제218회 익산시의회(임시회)

― 2019 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 예산집행실적
□	2019 상반기 성과 및 반성
□	2019 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	20		1	4	9	4	2
현 원	20		1	7	8	1	3
증 감	-		-	3	△1	△3	1

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	건설과 소관 용지매입, 토지수용 재결, 소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등, 사업관련 협의, 시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업 추진
	◦	하천시설	:	하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업
	◦	하천관리	:	하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과, 생태하천관리
	◦	가로등관리	:	가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	153.779	169.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	27.169	75.034	27%

□ 하천점용허가 현황(2019년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
600	457	57	86	316,263	238,548	11,533	66,182

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
28,360등	19,117등	9,243등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 3대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2019 예산집행실적

【 2019. 6. 15. 현재 】	(단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과					47,450,605	8,405,662	39,044,943	17.7
	도로시설관리				23,783,759	3,698,251	20,085,508	15.6
		시·군도농어촌도로확·포장			19,494,235	2,504,313	16,989,922	12.8
			금마갈산~서편간 도로확포장		500,000	32,363	467,637	6.4
			용동 삼정-두무간 도로확·포장		475,954	460,723	15,231	96.8	사고
			망성신성~관산간 도로확·포장		775,241	169,169	606,072	21.8	명시 사고
			오산장신~만석간 도로확·포장		56,140	4,653	51,487	8.2	명시
			왕궁온수~시대간 (황암~상발)도로확포장공사		309,496	25,102	284,394	8.1	명시
			춘포토다리-덕동간 도로확포장공사		703,911	2,649	701,262	0.3	명시
			미불용지매입비 (시군농어촌도로)		115,000	23,981	91,019	20.8
			왕궁군도26호선(리도210호)도로확포장		220,000	0	220,000	0.0
			용안창리법성간 도로확·포장		1,117,974	202,746	915,228	18.1	명시 사고
			함라칠성~다은간 도로확포장공사		703,637	216,673	486,964	30.7	명시
			망성군도10호금지간 도로확포장공사		722,187	31,356	701,505	4.3	명시
			금마누동~신촌간 도로확포장공사		529,559	93,429	436,130	17.6	명시 사고
			시군농어촌도로 확포장사업추진		7,000	4,070	2,930	58.1
			군도23호선도로·확포장공사		7,610,145	230,646	7,379,499	3.0	명시 사고
			오산외용(외검산) 도로확포장공사		10,731	0	10,731	0.0	명시
			용동흥암마을 진입로확포장공사		283,162	76,827	206,335	27.1	명시
			어양어곳~부평간 도로확포장		873,211	718,818	154,393	82.3	명시
			오산면소재지진입도로 (군도2호)확포장공사		600,000	0	600,000	0.0	명시
			오산제일교회-정각사간도로(리도203호)확포장공사		690,887	82,805	608,082	11.9	명시
			황등도선-외화간 (면도104호)확포장공사		400,000	42,067	357,933	10.5	명시
			오산역~상아마을간(리도203호)병목구간도로확포장		200,000	0	200,000	0.0
			하나로-소간촌간도로 (리도203호)확포장공사		600,000	32,972	567,028	5.5	명시
			왕궁양동마을진입도로 (리도207호)확포장공사		700,000	35,236	664,764	5.0	명시
			춘포창평마을진입도로 (농도308호)확포장공사		100,000	0	100,000	0.0
			금마신정-증왕간도로 (리도202호)확포장공사		600,000	18,028	581,972	3.0	명시
			시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획용역		160,000	0	160,000	0.0
			왕궁금오동~군도22호간 도로(면도102호)확포장공사		300,000	0	300,000	0.0
			춘포오룡선 도로확포장		130,000	0	130,000	0.0
		주민숙원사업			38,960	16,053	22,907	41.2
			국내여비		37,960	15,634	22,326	41.1
			시책추진업무추진비		1,000	419	581	41.9
		철도건널목개량사업			425,447	39,222	386,225	9.2
			평화육교 재가설		425,447	39,222	386,225	9.2	명시
		교통관리개선사업			980,000	32,800	947,200	3.3
				용안난포삼거리 위험도로개선	700,000	17,990	682,010	2.5	명시
				회전교차로 설치 (삼기산사거리)	280,000	14,810	265,190	5.2
		도로조명시설관리			2,845,117	1,105,863	1,739,254	38.8
			보안등신규설치		379,000	91,554	287,446	24.1
			보안등신규설치		4,500	0	4,500	0.0	도보조
			노후가로등정비		735,100	132,960	602,140	18.1
			가로등,보안등 유지관리		1,598,809	768,867	829,942	48.0
			가로등보수차량 운영유지비		127,708	112,482	15,226	88.0
	재무활동(건설과)				10,970	0	10,970	0.0
			보전지출		10,970	0	10,970	0.0
			국고보조반환금		10,970	0	10,970	0.0
	하천정비				23,580,334	4,679,475	18,900,859	19.8
		하천정비 및 유지관리			23,580,334	4,679,475	18,900,859	19.8
			하천제방유지보수		407,073	307,018	100,055	75.4	명시 사고
			하천제방유지보수(자체)		1,200,032	382,305	817,727	31.8	명시 사고
			소하천정비(생활)		2,044,459	569,443	1,475,016	27.8	명시 사고
			국가하천유지관리(4대강)		341,000	35,963	305,037	10.5
			지방하천정비 (왕궁천,동명천)		16,931,852	2,399,051	14,532,800	14.1	계속비
			만경강문화관 진입도로개설공사		1,350,000	655,501	694,499	48.5	사고
			국가하천유지보수 (4대강외)		160,000	9,572	150,428	5.9
			하천관리및유지관리 (해지천)		227,519	227,501	18	99.9	사고
			소하천정비(동산천)		542,899	45,025	497,874	8.2	명시
			하천공사프로그램 (CAD)구입		3,500	3,096	404	88.4
			소하천정비(닭작골천)		372,000	45,000	327,000	12.1
	행정운영경비				75,542	27,936	47,606	36.9
			인력운영비		40,000	10,514	29,486	26.2
			기본경비		35,542	17,422	18,120	49.0

2019 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민 편익 증대

▸상반기 공사 완료사업 : 1개소

- 용동 삼정~두무간 도로확포장공사 (L=1.21㎞, B=8.0m)	: 2019.  3.  26.

▸상반기 신규 착공사업 : 3개소

- 용안 창리~법성간 도로확포장공사 (L=0.84㎞, B=8.0m)

- 오산제일교회~정각사간 도로확포장공사 (L=0.4km, B=8.0m)

- 왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사 (L=0.6km, B=8.0m)

◦ 교통사고 위험지역 주요 교차로 정비 (회전교차로 설치)

▸상반기 공사 신규 착공(발주)사업 : 2개소

- 용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업

- 삼기산사거리 회전교차로 설치사업

◦ 평화육교 재가설을 통한 안전성 확보와 KTX호남고속철도의 안전한 교통망 구축

▸대체우회도로 설치(4차로) 운영	: 2018.  4.  ~  2020

▸평화육교 철거(전면통제 2018.7~2019.12)	: 2018.  7.  ~  2020

▸평화육교 재가설공사	: 2018. 10. ~ 현재

※ 전체 공정율 33.0% (19년 5월말 기준)

◦ 왕궁천 하천정비공사(왕궁1지구) 착수(‘19.3.11.)

▸익산천 합류점 ~ 흥암교(4.62㎞)

◦ 만경강 문화관 토지 및 지장물 보상	: ~ 2019. 6월 현재

▸전체 7필지 중 5필지 보상완료, 지장물 등 보상비 지출 : 655백만원

◦ 도로조명 설치 및 정비로 밝은거리 조성하여 안전한 보행환경 도모

▸노후가로등정비 - 126개소,  보안등 설치 - 178개소

▸가로등·보안등 민원처리  2638건

□ 반      성

◦ 2004년 양여금법 폐지로 국비 지원이 전면 중단됨에 따라 농어촌도로확포장사업이 부진(현재 포장율 46%)하였으나, 금년 농어촌도로정비계획 재수립 용역 시 주민수혜도, 교통량, 필요성 등을 종합적으로 검토하여 중장기 정비계획을 수립·농촌지역의 고통편익 및 농산물 생산·유통 환경의 교통기반시설을 구축하겠음.

2019 주요업무 추진상황

		군도23호선 도로 확·포장사업
		평화육교 재가설사업
		시·군도 및 농어촌도로확포장
		왕궁천 하천환경 정비사업
		동명천 하천환경 정비사업
		소하천 정비사업
		만경강 문화관 조성사업
		도로조명 개선

1		군도23호선 도로확포장사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2020. 11.

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=16.5 - 20.5m(2차로 ⇒ 4차로)

◦ 총사업비 : 12,500백만원(공사비 9,000 보상비 3,100 기타 400)

계	2018년까지	2019년	2020년이후
12,500백만원	8,520백만원	2,980백만원	1,000백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 지방재정 투자심사	: 2013. 6.  4.

◦ 실시설계 및 도시계획시설결정 용역	: 2013. 7.~2015. 1.

◦ 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시	: 2015. 6. 15.

◦ 실시계획인가 고시(익산시 고시 제 2016-4호)	: 2016. 1.  8.

◦ 토지보상 공람공고 및 감정평가	: 2016. 1.~2016. 6.

◦ 토지 및 지장물 손실보상	: 2016. 6. ~ 현재

◦ 공사 착공	: 2018. 5. 28.

◦ 공사 추진(1차분)	: 2018. 5. ~ 현재

▸공사 공정율 – 20%(토공 및 배수공)

□ 하반기 추진계획

◦ 잔여토지 손실보상 지속추진 및 수용재결	: 2019. 6. ~ 12.

▸대상 – 총 434필지 111,650㎡ 중 미협의 38필지 9,373㎡ (협의율 91%)

◦ 하반기 공사 추진	: 2019. 6. ~ 12

▸주요공정 : 토공, 배수공, 구조물공 등 (’19년 말 예정공정율 51%)

◦ 공사 준공	: 2020. 11.

2		평화육교 재가설사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2020.  6.

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m(4차로 ⇒ 6차로)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 49,700백만원(국비 30,700 익산시 19,000)

구 분	계	2018년까지	2019년	2020년이후	비고
계	49,700	38,205	5,000	6,495
국 비	30,700	23,600	5,000	2,100
시 비	19,000	14,605	-	4,395

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

□ 상반기 추진실적

◦ 기재부 총사업비 승인	: 2015. 4. 6.

◦ 기본 및 실시설계 용역	: 2015.11.~2017.1.

◦ 공사 착공	: 2017. 7. 18.

◦ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2017. 9. ~ 현재

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2017. 7. ~ 현재

▸대체우회도로 설치(4차로)	: 2018. 4. ~  7.

▸평화육교 철거(전면통제 2018.7.~2019.12.)	: 2018. 7. ~  9.

▸평화육교 재가설공사	: 2018.10. ~ 현재

※ 전체 공정율 35%

□ 하반기 추진계획

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2019. 6.~2020. 6.

▸농업용수로 이설, 접속램프 및 교량 재가설

◦ 평화육교 완전개통	: 2020. 6.

3		시·군도 및 농어촌도로확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산, 용동, 망성, 용안, 금마, 왕궁, 삼기, 함라, 춘포, 낭산, 황등, 어양동, 부송동 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2021.

◦ 사업규모 : L= 26.27km, B= 6.5~ 23.0m

◦ 총사업비 : 26개사업 12,669백만원(본예산 6,837 추경 640 이월예산 5,192)

▸망성 신성~관산간 도로확·포장공사	:  774백만원

- L=1.156km, B=7.0m	(본 392, 명 262, 사 120)

▸용안 창리~법성간 도로확·포장공사	: 1,117백만원

- L=0.84km, B=8.0m	(본 490, 명 467, 사 160)

▸용동 삼정~두무간 도로확·포장공사	:  476백만원

- L=1.21km, B=7.0m	(사 476)

▸함라 칠성~다은간 도로확.포장공사	:  704백만원

- L=1.00km, B=8.0m	(본 250, 명 454)

▸망성 군도10호~금지간 도로확·포장공사	:  722백만원

- L=1.20km, B=8.0m	(본 375, 명 347)

▸용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사	:  283백만원

- L=0.30km, B=6.0m	(명 283)

▸금마 누동~신촌간 도로확·포장공사	:  528백만원

- L=0.93km, B=7.0m	(본 180, 명 290, 사 58)

▸왕궁 온수~시대간 도로확·포장공사	:  309백만원

- L=3.00km, B=8.0m	(명 309)

▸춘포 토다리~덕동간 도로확·포장공사	:  703백만원

- L=1.00km, B=8.0m	(본 450, 명 253)

▸어양동 어곳~부평간 도로확·포장공사	:  873백만원

- L=0.80km, B=8.0m	(본 500, 명 373)

▸금마 신정~중왕간 도로확·포장공사	:  600백만원

- L=1.20km, B=8.0m	(본 500, 명 100)

▸황등 도선~외화간 도로확·포장공사	:  357백만원

- L=0.70km, B=8.0m	(본 300, 명 57)

▸오산 제일교회~정각사간 도로확·포장공사	:  690백만원

- L=0.40km, B=8.0m	(본 500, 명 190)

▸왕궁 양동마을 진입도로 확·포장공사	:  700백만원

- L=0.60km, B=8.0m	(본 600, 명 100)

▸하나로~소간촌간 도로확·포장공사	:  600백만원

- L=1.00km, B=8.0m	(본 500, 명 100)

▸오산면 소재지 진입도로 확·포장공사	:  600백만원

- L=0.95km, B=23.0m	(본 500, 명 100)

▸오산역-상아마을간 병목구간 도로확·포장공사	:  200백만원

- L=0.2km, B=8.0m	(본 200)

▸춘포 창평마을 진입도로 확·포장공사	:  100백만원

- L=0.7km, B=8.0m	(본 100)

▸왕궁 군도26호선 도로확·포장공사	:  220백만원

- L=1.7km, B=8.0m	(본 220)

▸금마 갈산-서편간 도로확·포장공사	:  500백만원

- L=1.6km, B=8.0m	(본 500)

▸삼기산사거리 회전교차로 설치사업	:  280백만원

- 회전교차로 1식	(본 280)

▸용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업	:  700백만원

- 회전교차로 1식	(명시 700)

▸오산 장신~만석간 도로확·포장공사	:  56백만원

- 농경지 연결도로 33개소(B=3.0m, L=10m) (추경 50 명시 6)

▸시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획용역	:  160백만원

- 도로 기본·정비계획(변경)수립	(추경 160)

▸왕궁 금오동~군도22호간 도로확·포장공사	:  300백만원

- L=0.55km, B=8.0m	(추경 300)

▸ 춘포 오룡선 도로확·포장공사	:  130백만원

- L=0.5km, B=8.0m	(추경 130)

□ 상반기 추진실적

◦ 망성 신성~관산간 도로 확·포장공사

▸실시설계 용역 추진	: 2018.  5. ~  8.

▸공사 추진	: 2018.  9. ~ 현재

◦ 용안 창리~법성간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2017.  7. ~ 2018. 2.

▸행정절차 이행 및 손실보상	: 2018.  3. ~ 현재

▸공사 발주 및 착공	: 2019.  5.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸공사 추진(토공, 배수공, 구조물공 등)	: 2016.  3. ~ 2019. 3.

▸공사 완료	: 2019.  3. 26.

◦ 함라 칠성~다은간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018.  1. ~ 6.

▸공사 추진	: 2018. 10. ~ 현재

◦ 망성 군도10호~금지간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018.  1. ~ 6.

▸공사 추진	: 2018. 10. ~ 현재

◦ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사

▸실시설계 용역 추진	: 2018.  1. ~ 3

▸공사 추진	: 2018. 10. ~ 현재

◦ 금마 누동~신촌간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2017.  7.~ 2018.  4.

▸공사 추진	: 2018. 10. ~ 현재

◦ 왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2019.  2. ~ 현재

◦ 춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018.  1. ~ 6

▸행정절차 이행 및 손실보상	: 2018.  6. ~ 현재

◦ 어양동 어곳~부평간 도로 확·포장공사

▸실시설계 용역 추진	: 2018.  1. ~ 6.

▸행정절차 이행 및 손실보상	: 2018.  6. ~ 현재

◦ 금마 신정~중왕간 도로확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018. 10. ~ 현재

◦ 황등 도선~외화간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018.  8. ~ 2019.  3.

▸행정절차 이행 및 보상계획열람공고	: 2019.  4. ~ 현재

◦ 오산 제일교회~정각사간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018.  8. ~ 2019.  2.

▸행정절차 이행 및 손실보상	: 2019.  3. ~ 현재

▸공사 착수	: 2019.  6.  5.

◦ 왕궁 양동마을 진입도로 확·포장공사

▸실시설계용역 추진	: 2018.  8. ~ 2019.  3

▸행정절차 이행 및 손실보상	: 2019.  4. ~ 현재

▸공사 착수	: 2019.  6.  3.

◦ 하나로~소간촌간 도로확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018.  8. ~ 현재

◦ 오산면 소재지 진입도로 확·포장공사

▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진	: 2018.  8. ~ 현재

□ 하반기 추진계획

◦ 망성 신성~관산간 도로 확·포장공사

▸미매입토지 및 지장물 협의매수	: 2019.  6. ~  9.

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 12.

◦ 용안 창리~법성간 도로 확·포장공사

▸미매입토지 및 지장물 협의매수	: 2019.  6. ~  9

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 12.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸공사 준공	: 2019.  3. 26.

◦ 함라 칠성~다은간 도로 확·포장공사

▸미매입 토지 협의매수	: 2019.  6. ~  9.

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 12.

◦ 망성 군도10호~금지간 도로 확·포장공사

▸미매입 토지 협의매수	: 2019.  6. ~  9.

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 12.

◦ 용동 흥왕마을 진입로 확·포장공사

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 8.

◦ 금마 누동~신촌간 도로 확·포장공사

▸미매입 토지 협의매수 및 수용재결	: 2019.  6. ~  9.

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 12.

◦ 왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사

▸실시설계 및 소규모환경영향평가용역	: 2019.  6. ~ 9.

◦ 춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  6. ~ 12.

▸공사 추진	: 2020.  3. ~ 12.

◦ 어양동 어곳~부평간 도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  6. ~ 2020. 12

▸공사추진	: 2021.  3. ~ 12.

◦ 금마 신정~중왕간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  6. ~  8

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019. 10. ~ 2020.  6.

▸공사 추진	: 2020.  7. ~ 2021. 12.

◦ 황등 도선~외화간 도로확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  6. ~ 12.

▸공사 추진	: 2020.  3. ~ 12.

◦ 오산 제일교회~정각사간 도로확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  6. ~ 10.

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 2020.  6.

◦ 왕궁 양동마을 진입도로 확·포장공사

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  6. ~ 10.

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 2020.  6.

◦ 하나로~소간촌간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  6. ~  8.

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019. 10. ~ 2020.  6

▸공사 추진	: 2020.  7. ~ 2021. 12

◦ 오산면 소재지 진입도로 확·포장공사

▸실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  6. ~ 10.

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019. 12. ~ 2020. 12.

▸공사 추진	: 2021.  1. ~ 2022. 12.

◦ 용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업

▸공사 추진	: 2019.  6. ~ 12.

◦ 오산역-상아마을간 병목구간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  6. ~  9.

▸공사 추진	: 2019.  9. ~ 2020.  7.

◦ 춘포 창평마을 진입도로 확·포장공사

▸실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  6. ~ 12.

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2020.  1. ~  4.

▸공사 추진	: 2020.  5. ~ 12.

◦ 왕궁 군도26호선 도로확·포장공사

▸실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  6. ~ 12.

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019.  9. ~ 2020.  6.

▸공사 추진	: 2020.  7. ~ 2021. 12.

◦ 금마 갈산-서편간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 및 행정절차 이행	: 2019.  6.~ 10.

▸편입토지 및 지장물 손실보상	: 2019. 12. ~ 2020.  6.

▸공사 추진	: 2020.  7. ~ 2021. 12.

◦ 삼기산사거리 회전교차로 설치사업

▸공사추진	: 2019.  7. ~ 2020.  6.

◦ 오산 장신~만석간 도로확·포장공사

▸설계 및 공사 추진	: 2019.  7. ~  12.

◦ 시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역

▸도로 기본·정비계획(변경) 수립용역 발주	: 2019.  7.

▸용역 추진	및 행정절차 이행	: 2019.  7. ~ 12.

◦ 왕궁 금오동~군도22호간 도로확·포장공사

▸실시설계용역 발주	: 2019.  7.

▸용역 추진	및 행정절차 이행	: 2019.  7. ~ 12.

◦ 춘포 오룡선 도로확·포장공사

▸실시설계용역 발주	: 2019.  7.

▸용역 추진	및 행정절차 이행	: 2019.  7. ~ 12.

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2019년 예산액	금후 투자
	26개사업	L=26.27km B=6.5-23m	44,671	11,549	7,477	25,645
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,198	806	392		착공	망성 303 (신선선)
2	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	1,250	760	490		보상	용안 203 (자석선)
3	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	1,847			공정율 90%	용동 204 (삼두선)
4	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	940	690	250		착공	함라 201 (진다선)
5	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,055	680	375		착공	군도 10호
6	용동 흥왕마을 진입로 도로확.포장	L=0.3km B=6.0m	370	370			착공	용동 209 (흥왕선)
7	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	505	180	726	착공	금마 102 (누부선)
8	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	616		2,187	용지 57%	군도 21호
9	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,920	427	450	1,043	보상	춘포 103 (신화선)
10	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m	3,700	450	500	2,750	보상	시도 1268
11	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,500	100	500	900	설계중	금마 202 (서오선)
12	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,000	100	300	600	설계중	황등 104 (황팔선)
13	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	700	200	500		설계중	오산 203 (신수선)
14	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m	1,200	100	600	500	설계중	왕궁 207 (양곡선)
15	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,400	100	500	800	설계중	삼기 203 (석라선)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2019년 예산액	금후 투자
16	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=23.0m	1,900	100	500	1,300	설계중	군도2호
17	오산역 –상아마을간 도로확포장공사	L=0.2km B=8.0m	200		200		설계중	오산 203 (신수선)
18	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	L=0.7km B=8.0m	1,500		100	1,400	신규	춘포 308 (창평선)
19	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577	220	2,173	용지 75%	군도 26호
20	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	279	500	2,050	설계중	금마 101 (서삼선)
21	삼기산사거리 회전교차로설치	회전교차로 1식	280		280		설계중	삼기209 삼기103 지방도722
22	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	회전교차로 1식	700	700			설계중	지방도706 용안201
23	오산 장신~만석간 도로확.포장	농경지연결 도로 33개소	1,034	984	50		1회추경	오산 301 (용연선)
24	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	정비계획 1식	160		160		1회추경
25	왕궁 금오동~군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m	1,000		300	700	1회추경	왕궁 102 (농장선)
26	춘포 오룡선 도로확.포장	L=0.5km B=8.0m	1,000		130	870	1회추경	춘포 102 (오룡선)
23	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
24	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
25	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
26	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)

4		왕궁천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리~춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2022.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25km

(단위:㎞, 백만원)

구 분	위치	연장	사업비	내용
합 계		9.25	47,368	축제, 보축, 교량재가설(9)
1지구	익산천 합류점 ~ 흥암교	4.62	23,693	축제, 보축, 교량재가설(5)
2지구	흥암교 ~ 보석박물관	4.63	23,675	축제, 보축, 교량재가설(4)

◦ 총사업비 : 47,368백만원(국비 23,684  도비 9,474  시비 14,210)

구 분	계	2018년까지	2019년	2020년이후	비고
계	47,368	9,369	5,937	32,062
국 비	23,684	4,653	3,000	16,031
도 비	9,474	1,924	1,137	6,413
시 비	14,210	2,792	1,800	9,618

□ 상반기 추진실적

◦ 왕궁1지구 공사 계약 및 착수	: 2019.  3.

▸시공사 : ㈜시티(51%), ㈜우림종합조경(49%)

◦ 시공 측량	: 2019.  4.

◦ 현장사무소 축조 및 보링 등 시추조사	: 2019.  5. ~ 현재

▸공정율 5%

□ 하반기 추진계획

◦ 왕궁천 하천기본계획 고시(익산지방국토관리청)	: 2019.  6.

◦ 실시계획 변경인가	: 2019.  7.

◦ 공사(1지구) 추진	: ~ 2020. 12.

5		동면천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리~왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2021.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05km

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

◦ 총사업비 : 15,480백만원(국비 7,740  도비 3,096  시비 4,644)

구 분	계	2018년까지	2019년	2020년이후	비고
계	15,480	1,800	5,080	8,600
국 비	7,740	900	2,540	4,300
도 비	3,096	360	1,016	1,720
시 비	4,644	540	1,524	2,580

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계(1차분) 준공	: 2019.  1.

◦ 동면천 하천기본계획 심의(익산지방국토관리청)	: 2019.  3.

▸동면천 계획홍수위 등 하천기본계획 변경

◦ 실시설계(교량 재설계 등) 조정	: 2019.  3. ~ 현재

□ 하반기 추진계획

◦ 동면천 하천기본계획 고시(익산지방국토관리청)	: 2019.  6.

◦ 실시설계 2차 협의(익산지방국토관리청)	: 2019.  7.

◦ 편입토지 협의보상 추진	: 2019.  8.

6		소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업별 세부현황

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
대판천 소하천정비공사	삼기면 연동리 일원	2017. ~ 2019.	3,057(국 1,528 시 1,529)	소하천정비 L=1.275km
동산천 소하천정비공사	웅포면 맹산리 일원	2018. ~ 2020.	2,700 (국 1,350 시 1,350) ▸2019년 : 386	소하천정비 L=1.018km
닭작골천 소하천정비공사	여산면 여산리 일원	2019. ~ 2022.	3,902 (국 1,951 시 1,951) ▸2019년 : 372	소하천정비 L=1.4km

◦ 사업비 세부현황

(단위 : 백만원)

구 분		계	2018년까지	2019년	2020년이후	비고
대판천	계	3,057	3,057	-	-
	국 비	1,528.5	1,528.5	-	-
	시 비	1,528.5	1,528.5	-	-
동산천	계	3,210	320	386	2,504
	국 비	1,605	160	193	1,252
	시 비	1,605	160	193	1,252
닭작골천	계	3,902	-	372	3,530
	국 비	1,951	-	186	1,765
	시 비	1,951	-	186	1,765

□ 상반기 추진실적

【 대판천 】

◦ 공사 추진	: 2018.  5. ~ 현재

▸교량공, 호안공 등 공정율 : 85%

【 동산천 】

◦ 실시설계(안) 주민설명회(2회)	: 2018.  4./ 19. 3.

◦ 사전설계검토(전북도)	: 2019.  1.

◦ 총사업비 변경(2,700 → 3,210백만원, 증 510) 승인	: 2019.  4.

【 닭작골천 】

◦ 실시설계용역 착수	: 2019.  3.

□ 하반기 추진계획

【 대판천 】

◦ 공사 완료	: 2019.  9.

【 동산천 】

◦ 시행계획 수립 공고 및 편입토지 보상	: 2019.  6. ~ 9.

◦ 공사 발주	: 2019. 10.

【 닭작골천 】

◦ 실시설계(안) 주민설명회	: 2019.  7.

◦ 사전설계검토(전북도)	: 2019.  9.

◦ 시행계획 수립 공고 및 편입토지 보상	: 2019. 12. ~ 2020. 5.

7		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년

◦ 사 업 비 : 11,350백만원(국비 10,000 시비 1,350 토지매입비)

◦ 사업내용 : 13,814㎡[지하 1층, 지상2층/연면적 1,686㎡]

◦ 시설현황 : 다목적실, 로비, 사무실, 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강신탁지구 하천정비사업에 포함)

□ 상반기 추진실적

◦ 토지 및 지장물 보상	: ~ 2019. 6. 현재

▸전체 7필지 중 5필지 보상완료, 지장물 등 보상비 지출 금655백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 토지 및 지장물 보상 완료	: ~ 2019. 12.

◦ 건축 및 토목에 공사 추진(익산지방국토관리청 80억)	: 2019. 7. ~ 2020. 12.

◦ 건축물 내 콘텐츠관련 발주(익산지방국토관리청 20억)	: 2019. 9. ~

8		도로조명 개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사업예산 : 1,115백만원

◦ 사업내용 : 야간통행불편지역 도로조명설치 및 보수, 노후가로등 정비 및 교체 설치 등

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산	비 고
합 계		14개 사업	1,115
보 안 등 신규설치	생활환경개선보안등설치	보안등신규설치 282개소	325
	주민숙원사업보안등설치	보안등신규설치 46개소	52
	서동로6길 8-1외3개소보안등설치	보안등신규설치 4개소	5	도보조
노후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비120개소	120
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 60개소	60
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	23
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	120
	동지역 보안등 보수	동지역 고장보안등 수리	78
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	42
	전기안전점검부적합보수단가	점검부적합보수 300개소	30
	1공단 중앙체육공원 사거리~비원삼거리앞 가로등 설치공사	LED가로등 설치15개소	30
	황등고가도로외 4개소 노후가로등교체	노후가로등정비 48개소	85
	남성고옆 도로 가로등 설치공사	가로등설치 13개소	45
	1번국도 진출입로 노후가로등 교체	노후가로등정비 81개소	100

□ 상반기 추진실적

◦ 보안등신규설치 공사 2개사업( 92백만원)

◦ 노후가로등 정비공사 6개사업(106벡만원)

□ 하반기 추진계획

◦ 보안등신규설치 공사 추진	: 2019. 7. ~ 12.

◦ 노후가로등 정비공사 잔여사업 추진	: 2019. 7. ~ 12.