2019.  7.

제218회 익산시의회(임시회)

― 2019 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	건 설 국

주택과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 예산집행실적
□	2019 상반기 성과 및 반성
□	2019 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민 중심 주거복지 향상을 통한 주거안정 실현

		전 략 목 표
◦ ◦	사회적 약자에 대한 주거복지 지원으로 함께 사는 세상 구현 도시와 농촌 주거환경 개선을 통한 삶의 질 향상

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	저소득층 임대보증금 등 주거복지 지원 노후된 공동주택 지원으로 쾌적하고 안전한 도시 조성 농촌주거환경개선으로 살기 좋은 주거 공간 조성

일   반   현   황

□ 기        구

							주택과
주택행정			공동주택			공동주택관리			주거복지			건축민원			건축물관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25		1	6	8	5	5
현 원	24		1	9	5	4	5
증 감	△1			3	△3	△1

□ 사 무 분 장

	◦	주택행정	:	주택행정종합기획조정, 불법건축물 지도단속, 건축물 부설주차장 관리, 시영아파트 관리
	◦	공동주택	:	주택건설사업계획 승인, 도시주거 환경 개선사업
	◦	공동주택관리	:	공동주택 지원사업, 공동주택 ∙ 임대주택 관리
	◦	주거복지	:	주택문화창의센터 운영, 희망의 집 고쳐주기, 저소득층 임대보증금, 주거급여 지원, 희망하우스 빈집재생사업
	◦	건축민원	:	건축허가, 건축심의, 건축물 안전점검, 건축 위원회 운영, 빈집정비사업
	◦	건축물관리	:	건축신고, 건축물대장 생성 말소 변경, 가설건축물축조신고, 건축신고부존재확인

□ 위 원 회 현 황

(단위 : 명)

계	건축위원회	공동주택지원 심사위원회	공동주택관리 분쟁조정위원회	임 대 주 택 분쟁조정위원회	분 양 가 심사위원회
5개 86명	47	11	9	9	10
	공 무 원 6	공 무 원 9	공 무 원 2	공 무 원 2	공 무 원 1
	의 원 3	민 간 인 2	변 호 사 1	변 호 사 1	변호사1, 교수1
	교 수 25		회 계 사 1	교 수 1	회계사1, 세무사1
	민 간 인 13		민 간 인 5	민 간 인 5	기타민간인 5

□ 주 택 현 황

◦ 주택수 137,364호 / 가구수 126,523호 (2019. 6. 주택공급통계정보시스템 기준)

▸단  독 56,739(41.3%)  ▸아파트 74,833(54.4%)  ▸연  립 3,274(2.4%)

▸다세대 1,403(1.0%)    ▸기  타 1,115(1%)

◦ 인구 1,000명당 주택수 472 / 주택보급율 108.5%

▸인구 290,508 [RIUS시스템(2019.6.)기준]

□ 의무관리 공동주택 현황

(2019.6.15기준)

구 분	총 계	분 양			임 대
		소 계	자치관리	위탁관리	소 계	자체관리	위탁관리
단지수	125	104	31	73	21	4	17
세대수	66,111	52,096	13,815	38,281	14,015	2,515	11,500

※ 의무관리 대상 공동주택 범위

- 300세대 이상 공동주택

- 세대수가 150세대이상 승강기가 설치된 공동주택․ 중앙집중식 난방 방식 공동주택

□ 임의관리 공동주택 현황

(2019.6.15기준)

구 분	총 계	아 파 트			연 립
		소 계	분 양	임 대
단 지 수	115	75	70	5	40
세 대 수	7,694	6,281	5,817	464	1,413

□ 시공중인 아파트 현황

(2019.6.15기준)

단 지 명	사업주체	사 업 규 모			사업승인일	준공예정	비고 (공정율)
		층수	연면적 (㎡)	세대수
계	10개			2,640
하이센스빌	하이센스빌	9층	2,750	71	2018.12.07	2020. 02	송학동 (3.0%)
모현오투그란데 프리미어	㈜제일건설	22층	59,105	338	2018.09.11	2021. 06	모현동 (8.9%)
한화꿈에그린 주상복합	아시아신탁(주)	38층	99,865	626	2018.01.19	2021. 04	부송동 (16.36%)
마동 코아루 디펠리체	㈜한국토지신탁	20층	30,654	223	2017.12.28	2020. 03	마동 (26.0%)
어양3차 제일오투그란데	㈜에버종합건설	23층	21,761	155	2017.11.16	2020. 05	어양동 (50.02%)
동산동 제일오투그란데	㈜제일건설	27층	46,958	301	2017.10.30	2020. 09	동산동 (50.07%)
동산동 코아루 이지움	㈜한국토지신탁	20층	45,682	338	2017.03.13	2019. 09	동산동 (83.37%)
영등동 도시형 생활주택	㈜무궁화신탁	15층	11,035	271	2016.12.22	2020. 12	영등동 (6.0%)
센트럴파크	㈜동서	28층	38,126	200	2016.08.05	2020. 05	어양동 (54.74%)
성안임대아파트	㈜성안	14층	12,934	117	2000.11.03	공사중지	송학동 (68.22%)

□ 건축민원 처리 현황

◦ 건축허가 및 건축신고 사용승인 현황

(2019.6.15기준)

구 분	계	건축허가	건축신고	용도변경	사용승인	비고
합 계	582	105	198	18	261
허가 및 사용승인	233	105		6	122
신고 및 사용승인	349		198	12	139

◦ 건축물대장관리 민원처리 현황

(2019.6.15기준)

구분 계	생성신청	기재사항 변경․정정	부존재 증명원	말 소	소유권정리및 전환․합병	비고
6,353	216	93	19	200	5,825

2019 예산집행실적

【 2019. 6. 15. 현재 】	(단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
주 택 과				20,258,130	7,252,916	13,005,214	35.8
소 계 (일반회계)				19,490,532	7,249,410	12,241,122	37.2
	서민주거안정			1,969,988	266,150	1,703,838	13.5
		주거환경개선		474,536	75,000	399,536	15.8
			2단계도시주거환경 개선사업	117,000	0	117,000	0.0
			기초생활인프라 (농촌빈집정비)	240,000	54,000	186,000	22.5
			도심빈집정비사업	57,536	21,000	36,536	36.5
			도심빈집정비사업(보조)	60,000	0	60,000	0.0
		주택관리		1,495,452	191,150	1,304,302	12.8
			도시미관조성	45,660	20,500	25,160	44.9
			공동주택지원사업	136,200	36,300	99,900	26.6
			공동주택지원사업(보조)	740,000	0	740,000	0.0
			소규모주민숙원사업	273,300	133,300	140,000	48.7
			건축민원관리	300,292	1,050	299,242	0.3
	주거문화정착			17,110,557	6,884,153	10,226,404	40.2
		저소득층 주거환경개선		17,110,557	6,884,153	10,226,404	40.2
			저소득층 노후주택 개보수	796,000	540,000	256,000	67.8

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			저소득층 임대보증금	164,880	136,972	27,908	83.1
			주택문화창의센터운영	186,253	106,763	79,490	57.3
			희망하우스 빈집재생	100,000	0	100,000	0.0
			주거급여(국토교통부)	15,780,624	6,077,618	9,703,006	38.5
			농어촌장애인 주택개조사업	22,800	22,800	0	100
			청년 임대보증금 지원	60,000	0	60,000	0.0
	행정운영경비			241,350	99,107	142,243	41.0
		인력운영비		210,736	82,561	128,175	39.1
			인력운영비	210,736	82,561	128,175	39.1
		기본경비		30,614	16,546	14,068	54.0
			기본경비	30,614	16,546	14,068	54.0
	재무활동			168,637	0	168,637	0.0
		보전지출		168,637	0	168,637	0.0
			보전지출	168,637	0	168,637	0.0
소 계 (특별회계)				767,598	3,506	764,092	0.4
	서민주거안정			754,398	356	754,042	0.1
		주택관리사업		9,314	356	8,958	3.8
			국민주택관리	9,314	356	8,958	3.8
		예비비		745,084	0	745,084	0.0
	재무활동			13,200	3,150	10,050	23.8
		보전지출		13,200	3,150	10,050	23.8
			보전지출	13,200	3,150	10,050	23.8

2019 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 노후 공동주택 지원으로 쾌적하고 안전한 도시 조성

‣소규모 주민숙원사업 대상 선정 및 추진	: 16개단지 / 237백만원

‣공동주택 지원사업 대상 선정 및 추진	: 10개단지 / 100백만원

‣공동주택관리 지원사업 대상 선정 및 추진	: 37개단지 / 740백만원

◦ 주택문화창의센터 운영 등 주거복지 지원

‣주택문화창의센터 주거환경개선서비스	: 362호 /  1,024건

(찾아가는 주택관리 서비스 시행: 70호, 205회)

‣저소득층 희망의 집 고쳐주기 시행	:  41호 / 540백만원

‣저소득층 무이자임대보증금 지원	:  28호 / 137백만원

‣주거급여 지원	: 8,456가구 / 6,078백만원

◦ 주거환경개선으로 살기 좋은 주거 공간 조성

‣농촌지역 노후주택개량사업 추진	: 83동

‣농촌 빈집정비사업 추진	: 22동 / 54백만원

‣도시지역 도심 빈집정비사업 추진	:  7동 / 21백만원

□ 반      성

◦ 상향된 민원 욕구에 대한 건축행정 서비스 미흡

‣능동적인 건축행정으로 민원서비스 향상

2019 주요업무 추진상황

		불법건축물 지도단속
		평화지구 주거환경개선사업
		노후 공동주택 환경개선사업
		모현 우남아파트 추진
		주거환경개선사업
		도심빈집정비 주민공간 조성 시범사업
		주택문화창의센터 운영
		희망의집 고쳐주기 사업
		저소득층 임대보증금 지원사업
		기초주거급여 수급자 주거급여 지원

1		불법건축물 지도 단속

□ 사 업 개 요

◦ 중점 단속대상

▸신축, 증․개축 등 불법 시공 건축물

▸다중이용시설 위법 및 부설 주차장 용도변경 위반 등

◦ 추진방법

▸위반사항 철거 등 시정토록 적극 유도

▸불법건축물 시정명령 후 미 이행시 고발, 이행강제금 부과 등 조치

□ 상반기 추진실적

◦ 상반기 불법건축물 지도단속 현황

적발건수	조치사항		비고
	철거	이행강제금	추인	고발
62건	8건	54건 (62,190천원)	7건	0건

□ 하반기 추진계획

◦ 기계식 부설주차장(18개소) 등 유지관리 지도점검	: 2019. 9. ~ 10.

▸기계식 주차장치 정기검사 미수검현장 행정지도

▸노후 기계식 주차장치 철거 후 자주식 설치 유도 등

◦ 관내 수시 불법건축물 지도단속 운영

2		평화지구 주거환경개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평동로 7길 35 일원(사업면적 63,599㎡, 이일여고 서편)

◦ 사업기간 : 2005. ~ 2022.

◦ 사업내용

▸공동주택 건설 : 1,027세대(임대 208 / 분양 819)

▸(LH대행사업)기반시설설치 : 도로확포장 L=1,084m, B=10~25m

◦ 사 업 비 : 기반시설설치비 14,570백만원(국 4,085 시 9,985 특 500)

※ LH 공동주택건설비 포함 : 2,000억원

□ 추 진 상 황

◦ 정비구역 지정 및 정비계획 결정	: 2007.  7.  6.

◦ 사업시행자 지정 및 협약 체결(익산시 ⇔ LH공사)	: 2008. 11. 11.

◦ 사업시행인가 고시	: 2014.  4. 18.

◦ 보상개시(토지 183필지, 지장물 153명, 영업보상 77명)	: 2016.  5.

▸현재 보상 완료(수용 포함), 주민 5명 보상가 증액 소송 진행 중

◦ 지장물 철거(철거율 : 98%)	: 2017.  5. ~

◦ 정비구역 및 정비계획 변경 고시	: 2018.  5. 30.

◦ 시공사 선정(LH공사)	: 2018. 12. 20.

▸㈜코오롱글로벌 외 2개사

◦ 착공연기(당초 2019. 04. 19. → 변경 2019. 10. 19.)	: 2019.  4. 19.

▸사유 : 지장물 철거 지연(당초 공사기간 2019. 4. ~ 2022. 1.)

□ 문제점 및 대책 (애로사항, 개선사항 등)

◦ LH에서 토지 인도소송 항소심 결과를 보고 강제집행 및 착공 예정(7~8월경 예상)

□ 하반기 추진계획

◦ 공사착공	: 2019.  8.

◦ 공사준공 및 입주	: 2022.  5.

3		노후 공동주택 환경개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 사용검사 후 10년 이상 경과한 공동주택(기 지원단지 4년간 제외)

◦ 사 업 량 : 63개단지 / 1,077백만원

▸소규모 주민숙원사업	: 16개 단지 / 237백만원

▸공동주택 지원사업	: 10개 단지 / 100백만원

▸공동주택관리 지원사업	: 37개 단지 / 740백만원

◦ 사업내용

▸단지 내 도로 및 가로등 보수, 상․하수도시설 보수 및 준설

▸어린이놀이터, 파고라, 체육시설 등 주민이 공동으로 이용하는 시설

□ 상반기 추진실적

◦ 소규모 주민숙원사업(16개 단지)

▸보조금 교부결정 및 사업 착수(10개소),미착수(6개소)	: 2019. 2 . ~ 5.

◦ 공동주택 지원사업(10개 단지)

▸신청접수 및 현장 조사 완료(신청단지:18개소)	: 2019.  5.

▸공동주택지원 심사위원회 개최 및 지원단지 선정	: 2019.  5. 14.

▸보조금 교부결정 및 사업 착수(2개소),미착수(8개소)	: 2019.  6. ~ 11.

◦ 공동주택관리 지원사업(37개 단지)

▸신청접수 및 현장 조사	: 2019.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 소규모 주민숙원사업

▸보조금 교부결정 및 사업 착수(6개소)	: 2019.  6. ~  7.

▸사업완료 및 보조금 정산	: 2019.  7. ~ 11.

◦ 공동주택 지원사업

▸보조금 교부결정 및 사업 착수(8개소)	: 2019.  6. ~  9.

▸사업완료 및 보조금 정산	: 2019.  9. ~ 11.

◦ 공동주택관리 지원사업

▸공동주택지원 심사위원회 개최 및 지원단지 선정	: 2019.  7.

▸보조금 교부결정 및 사업 착수(37개소)	: 2019.  7. ~  9.

▸사업완료 및 보조금 정산	: 2019.  9. ~ 11.

4		모현 우남아파트 추진

□ 대피명령 개요

◦ 일  자 : 2014. 9. 11.(목)

◦ 대  상 : 익산 모현동 우남아파트 103세대

◦ 내  용 : 재난 및 안전관리기본법 제40조에 따라 대피명령

◦ 사  유 : 재난위험시설로부터 주민보호

	모현우남아파트 현황
◦ 세대수 : 103세대 ◦ 건축물(사용승인 : ‘92. 10. 30) ▸ 규모 : 1동(지상 15층/지하1층), 구조 : 철근콘크리트, 연면적 : 9,444.65㎡ ※ 재난위험시설 지정(D급) : ‘02. 12. 31. ※ 주요하자 : 아파트 C·F Type 보 철근 누락(25세대), 슬래브 균열 등

□ 추 진 상 황

◦ 재난위험시설의 지정(D급) 및 고시	: 2002. 12. 31.

◦ 부실시공 손해배상(30억) 청구 소송제기(수원지법)	: 2003.  4. 22.

◦ 대법원 확정판결(우남건설은 원고에게 744백만원 지급)	: 2010.  3. 25.

◦ 재난위험시설 긴급대피명령(안전총괄과)	: 2014.  9. 11.

◦ 익산시의회 청원심사 특별위원회 개최	: 2014. 12. 22.

◦ 모현우남아파트 안전점검 강화	: 2015.  4. 14.

‣경사계 4개, 균열 계측기 11개, 스라브 처짐 변위 측정 2개 등

◦ 모현우남아파트 해결방안 모색을 위한 토론회	: 2015. 12. 11.

‣익산시 3, 시의원 2, 전문가 5, 이주자 및 거주자 대표 불참

◦ 거주세대 실태 점검(거주 44, 이주 59)	: 2016.  4. ~ 5.

◦ LH공사와 MOU 체결(모현우남아파트 재개발 등)	: 2016. 11.  9.

◦ 중장기 지역발전 구상용역 발주(LH) 및 용역 착수	: 2017.  4.  5.

◦ 도시재생 뉴딜사업 공모 신청	: 2017. 10. 25.

‣공모결과 : 탈락(잔존하는 주민 갈등이 원인으로 판단)

◦ 2018년도 도시재생 뉴딜사업 공모 재신청 검토	: 2018.  5. ~ 6.

‣주민 협의 결과 주변아파트 시세대로 보상을 요구하여 공모 미신청

◦ 공론화위원회 1차 회의 개최	: 2019.  5. 23.

‣회의결과

- 정밀안전진단 조속 시행, 주민창구 일원화 노력바람

- 현장에서 주민 대표를 참여시켜 다음 회의 진행

□ 문제점 및 대책 (애로사항, 개선사항 등)

◦ 보상가 등으로 주민들의 도시재생사업 반대 의견이 많으며, 이외에 재건축 등 추진방향에 대해서도 주민 합의 도출이 어려움

◦ 「익산시 공론화위원회 설치 및 운영조례」에 따라 공론화 위원회를 개최하여 사회 전반적인 다양한 의견을 수렴하여 해결방안 모색

□ 하반기 추진계획

◦ 회의 참석 요청을 위한 이주세대, 거주세대 면담	: 2019. 6. ~ 7.

◦ 모현 우남아파트 공론화위원회 2차 회의 개최	: 2019. 7.

5		주거환경 개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019.  1. ~ 12.

◦ 사업내용

【농촌주택개량】

▸사업대상 : 농촌지역 노후주택[읍‧면지역, 동지역(주‧상‧공업지역 제외)]

▸사 업 량 : 83동

▸융자조건 ⇒ 연2%, 1년 거치 19년 분할상환 또는 3년 거치 17년 분할상환

【농촌빈집정비】

▸사업대상 : 1년이상 방치된 농어촌주택 철거보조금 지원

▸사 업 량 : 96동 / 240백만원(슬레이트 3,000천원, 기타지붕 1,500천원)

【도시빈집정비】

▸사업대상 : 2년이상 방치된 도시지역 주택 철거보조금 지원

▸사 업 량 : 22동 / 57백만원(슬레이트 3,000천원, 기타지붕 1,500천원)

□ 상반기 추진실적

◦ 주거환경 개선사업 신청 접수 및 배정	: 2019.  1. ~ 3.

◦ 빈집정비사업 신청 접수 및 대상자 확정	: 2019.  1. ~ 4.

◦ 사업완료 보조금 지급	: 2019.  4. ~ 6.

▸농촌빈집정비 22동, 도시빈집정비 7동

□ 하반기 추진계획

◦ 농촌 주택개량사업 추진 독려	: 2019.  7. ~

◦ 사업완료(농촌 및 도시빈집정비) 보조금 정산	: 2019.  6. ~ 12.

6		도심빈집정비 주민공간조성 시범사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019.  1. ~ 12.

◦ 사업대상 : 2년이상 방치된 동지역 빈집(주거·상업·공업지역)

◦ 사 업 량 : 3동 / 60백만원(도비 18  시비 42)

◦ 사업내용 : 빈집 철거 후 공공용지(주차장, 공원, 텃밭 등)로 3년간 활용

□ 상반기 추진실적

◦ 빈집정비사업 신청 접수	: 2019.  2.

◦ 빈집정비대상지 현지조사	: 2019.  4.

□ 하반기 추진계획

◦ 지정폐기물 조사용역 시행	: 2019.  6. ~ 7.

◦ 사업대상지 철거설계 및 발주	: 2019.  6. ~ 7.

◦ 사업시행	: 2019.  8.

◦ 공공용지로 사후관리(3년)	: 2019.  8. 이후

7		주택문화창의센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 저소득층 주거환경개선서비스

▸대    상 : 기초 및 차상위 거주 단독 및 소규모 공동주택

▸사 업 량 : 600호

▸사업내용 : 설비/건축/전기/통신/소방 분야 수리․교체․시공․기술지원

▸사 업 비 : 174백만원(재료비)

◦ 찾아가는 주택관리서비스(여성가족친화시책)

▸대    상 : 저소득 여성가장세대(독거노인, 모자가정, 소녀가정 등)

▸사 업 량 : 70호

▸사업내용 : 분기 1회 방문 주거불편사항 상담/수선/교체

□ 상반기 추진실적

◦ 저소득층 주거환경개선서비스	: 362호 / 1,024건

◦ 찾아가는 주택관리서비스(여성가족친화시책)	:  70호 / 205회

□ 하반기 추진계획

◦ 협업 및 모니터링을 통한 맞춤형 주거환경개선사업 추진	: 연 중

◦ 저소득 여성가장 주택 집중 수리교체	: 연 중

◦ 만족도 조사	: 2019. 11.

8		희망의 집 고쳐주기 사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 기초생활수급자 등 저소득층 노후 주택

◦ 사 업 량 : 199호(호당 400만원, 호당 사업 계약에 따라 사업량 변동가능)

◦ 사 업 비 : 796백만원(복권기금 50%, 시비 50%)

◦ 사업내용 : 지붕, 화장실, 부엌개량, 도배장판, 창호, 단열공사 등

◦ 사업시행자 : 위탁 시행

□ 상반기 추진실적

◦ 사업 계획 수립	: 2019.  1.

◦ 사업 신청 및 접수	: 2019.  1. ~ 2.

◦ 사업 대상자 선정완료	: 2019.  2.

◦ 대행업체 위탁계약 체결	: 2019.  3.

▸익산시새마을회, 익산지역자활센터, 익산원광지역자활센터

◦ 희망의 집 고쳐주기 사업  추진	: 2019.  4. ~ 10.

▸2019. 5월말 현재 41호 완료

□ 하반기 추진계획

◦ 사업 추진(158호)	: 2019.  6. ~ 10.

◦ 사업 완료	: 2019. 10.

◦ 보조금 정산	: 2019. 11.

9		저소득층 임대보증금 지원사업

□ 사 업 개 요

◦ 지원대상 : 무주택 기초생활수급자(생계·의료급여)

◦ 대상주택 : 14개소

▸영구임대 :  2개소(부송동 주공1차, 동산동 주공)

▸국민임대 : 12개소(부송동 주공3차 외 11개소)

◦ 사 업 량 : 40호(국민임대 12, 영구임대 28)

◦ 사 업 비 : 275백만원(도비 40%, 시비 60%)

※ 도비는 도예산 계상(도에서 직접 지출)

◦ 지원금액 : 호당 20백만원 이내(계약금 본인 부담)

◦ 지원기간 : 2년(연장 2회, 최대 6년간 지원)

□ 상반기 추진실적

◦ 저소득임대보증금 지원사업 공고 및 홍보(3회)	: 2019.  1. ~

▸시 홈페이지, 도내 일간지 등

◦ 저소득임대보증금 신청 및 지원	: 2019.  1. ~ 12.

▸지원실적 : 28호 229백만원(도비 92, 시비 137)

□ 하반기 추진계획

◦ 지원대상자 사후관리(사망, 전출자 등 지원금 회수 등)

◦ 사업완료 및 정산	: 2019. 12.

10		기초주거급여 수급자 주거급여 지원

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 9,704가구(소득인정액이 중위소득 44%이하 가구)

‣주거급여(임차) - 9,301가구, 수선유지급여(자가) - 403가구

◦ 사 업 비 : 15,781백만원 (주거급여 13,952, 수선유지급여 1,829)

◦ 지 원 액 : 가구원수, 소득, 주거비 부담 및 주택노후도에 따라 차등 지원

‣주거급여 : 최대 1인 가구 147천원, 2인 161천원, 3인 194천원, 4인 220천원

‣수선유지급여 : 대보수 1,026만원(7년), 중보수 702만원(5년), 경보수 378만원(3년)

◦ 추진방법

‣주거급여 : 매월 20일 개인별 계좌입금(임차료)

‣수선유지급여 : 한국토지주택공사(LH) 위탁 시행(집수리)

□ 상반기 추진실적

◦ 주거급여 지원	: 8,456가구 / 6,078백만원

‣주거급여(임차)	: 8,053가구 / 4,249백만원

‣수선유지급여(자가)	:  403가구 / 1,829백만원

◦ 수선유지급여 위탁 계약 (익산시 – LH)	: 2019.  2.

◦ 수선유지급여 사업 추진	: 2019.  3. ~

□ 하반기 추진계획

◦ 주거급여(임차료) 지원	: 연  중

◦ 수선유지급여(집수리) 사업 추진	: 연  중

◦ 주거급여 지원사업 완료 및 정산	: 2019. 12.