2019. 7.

제218회 익산시의회(임시회)

― 2019 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 예 산 집 행 실 적
□	2019 상반기 성과 및 반성
□	2019 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전 정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지 조성

일  반  현  황

□ 기          구

							하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리				지하수			폐수처리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	32	1	8	6	8	9
현 원	30	1	7	13	4	5
증 감	▵2		▵1	7	▵4	▵4

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사, 유천 생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 마을하수처리시설 운영 및 유지관리, 하수중계펌프장 운영 및 유지관리, CSOs 운영 및 유지관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과
◦	폐수처리 :	공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영관리, 산업단지 폐수 유입 승인, 배수설비 신고, 비용부담금 부과징수 등

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2018. 12.	비 고
시설	총인구	천명	294
	하수인구	천명	269
	보급률	%	91.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	118,531
	1일평균하수처리량	톤	116,184
	하수처리율	%	98.0
하수도 사용	개소수	전	39,783
	톤당 평균요금	원	695.8

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	28	145,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
제3일반산업단지 공동폐수처리시설	1	5,500㎥/일	직영

2018 예산집행실적

【 2019. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	관	항	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
하수도과				69,076,638	28,940,239	40,136,399	41.9
	하수도사업비용			36,964,635	26,947,460	10,017,175	72.9
		영업비용		36,796,835	26,947,089	9,849,746	73.2
			관거비	15,346,165	11,373,445	3,972,720	74.1
			펌프장비	449,549	114,044	335,505	25.4
			처리장비	17,368,875	13,993,454	3,375,421	80.6
			일반관리비	3,632,246	1,466,146	2,166,100	40.4
		영업외비용		2,800	371	2,429	13.3
			차입금이자상환	2,800	371	2,429	13.3
		예비비		165,000	-	165,000	-
				165,000	-	165,000	-
			예비비
	자본적지출			32,112,003	1,992,779	30,119,224	6.2
		유형자산취득		28,433,660	1,626,748	26,806,912	5.7
			구축물	27,687,493	1,348,490	26,339,003	4.9
			기계장치	289,000	149,387	139,613	51.7
			차량운반구	20,000	-	20,000	-
			공기구비품	11,850	9,863	1,987	83.2
			건설중인자산	425,317	119,008	306,309	28.0
		비가동설비자산취득		970,500	321,731	648,769	33.2
				970,500	321,731	648,769	33.2
			건설중인자산
		비유동부채상환		177,200	44,300	132,900	25.0
			정부차입금원금상환	177,200	44,300	132,900	25.0
		기타자본적지출		1,154,874	-	1,154,874	-
			정부보조금반환	1,154,874	-	1,154,874	-
		예비비		1,375,769	-	1,375,769	-
			예비비	1,375,769	-	1,375,769	-

2019 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

▸ 춘포 쌍정·반도·궁월지구 하수관로 정비공사 추진

- 관로정비 3.1km, 배수설비 109개소 (공정율 70%)

▸ 함열 서부3처리분구 3공구(와리) 배수설비 설치공사 외 3건

- 배수설비 96개소 설치완료

▸ 남부2.3, 북부2처리분구 하수관로 정비공사 발주 및 업체선정

- 오수관로 30.5km, 배수설비 2,646가구

◦ 공공하수처리장 운영을 통한 수질환경개선

▸ 총27개소(139,561㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

▸ 하수처리시설 기능보강 추진으로 처리효율 향상 및 수질오염 저감

- 여산처리장 수전설비 자동구간 개폐기 수리 외 8건

◦ 하수찌꺼기 감량화 사업 추진을 위한 재원확보

▸ 재원협의와 총사업비 변경 완료 및 금강수계기금 9.27억원 확보

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

▸ 소규모 공사 70건 완료 및 생활민원처리 1,000여건 완료

▸ 시내 일원 침수 우려 지역 12개소 등 하수도 L=15km 준설 완료

▸ 하수생활민원 처리를 위한 직원 비상근무조 편성운영 : 945건

- 맨홀 및 하수도 준설, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차조정 등

□ 반      성

◦ 낭산 폐석산 침출수 처리수 유입에 따른 익산공공처리시설 방류수

수질기준 초과 발생

2018 주요업무 추진상황

		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 익산시 하수도정비 기본계획 수립용역 하수찌꺼기 감량화 사업 공공하수처리시설 운영관리 소규모 하수도관련 주민숙원사업 유천생태습지 유지관리

1		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2022. 12.

◦ 사 업 비 : 36,490백만원(국비 25,543, 도비 1,094, 시비 9,853)

▸ 2019년 - 6,182백만원(국비 4,328, 도비 185, 시비 1,669)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=30.5km, 배수설비 2,646가구

□ 상반기 추진실적

◦ 시설공사 입찰 의뢰(시⇒조달청)	: 2019. 02. 12.

◦ 건설사업관리용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 04. 26.

◦ 시설공사 계약  [(주)성지건설]	: 2019. 05. 28.

◦ 건설사업관리용역 계약  [(주)삼안]	: 2019. 05. 31.

□ 하반기 추진계획

◦ 시설공사 시행	: 2019. 06. ~ 2022. 12.

◦ 건설사업관린 용역 시행	: 2019. 06. ~ 2022. 12.

2		익산시 하수도정비 기본계획 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 6.

◦ 사업내용 : 하수도 기본현황 조사 및 정비기본계획 수립 1식

◦ 총사업비 : 1,800백만원 (시비)

※ 2019년 사업비 : 800백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 기본계획용역 익산시 계약심사	: 2019. 02. 21.

◦ 실시설계용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 05. 14.

□ 하반기 추진계획

◦ 하수도정비기본계획 수립 용역 발주	: 2019. 06.

◦ 하수도정비기본계획(안) 작성 및 검토 협의	: 2019. 06. ~ 2020. 07.

※ 전라북도 새만금수질개선과, 새만금지방환경청 환경관리과

◦ 하수도정비기본계획(안) 승인 [환경부]	: 2020. 하반기 중

3		하수찌꺼기 감량화사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 26,844백만원(국비70%, 도비15%, 시비11.5%, 기금3.5%)

◦ 사업내용 : 전처리설비, 혐기성소화조, 바이오가스 정제설비 등 개선 및 신설

□ 상반기 추진실적

◦ 환경부 재원협의 및 총사업비 변경 완료	: 2018. 12. ~ 2019. 05.

▸ 총사업비 증액 : 210.20억원 → 268.44억원

▸ 사유 : 타당성조사 때 누락된 연약지반처리비, 철거비 등 반영

▸ 금강수계기금 9.27억원 확보 : 시비 부담 경감(40.27억원→31.00억원)

◦ 설치(변경)인가 신청	: 2019. 05.

◦ 건설사업관리용역 발주의뢰(원가심사 포함)	: 2019. 05.

◦ 본공사 총괄분 및 1차분 발주의뢰(원가심사 포함)	: 2019. 05.

▸본공사 1차분 : 가설사무소, 철거공사, 기초공사, 가스정제설비 등

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2019. 06.

□ 하반기 추진계획

◦ 설치(변경)인가 완료	: 2019. 07.

◦ 건설사업관리용역 및 본공사 착공	: 2019. 08.

◦ 준공(시운전 8개월 포함)	: 2021.

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 사 업 개 요

◦ 공공하수처리시설 : 27개소

시설명	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	익산	북부	함열	금마	분뇨
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	89개소	100,000	30,000	6,000	1,100	150
운영방식	직 영		직영76 위탁13	위탁운영[(주)전북엔비텍BTO, 2008.~2028.]

◦ 직영 시설 관리인원 : 4명(전기운영1, 기계운영1, 열관리운영1, 기계1)

◦ BTO위탁운영비 예산 : 144억원(도비 5.9억원 시비 138.3억원)

□ 상반기 추진실적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개항목)

▸ 익산 외 4개소(일1회), 소규모 12개소(주1회), 소규모 9개소(월1회)

▸ 소규모하수도시설 및 중계펌프장 운영 관리 : 주1~2회 수시점검

◦ 공공하수처리시설 기능보강 실시 : 여산 외 5개소 17,870천원

◦ 공공하수처리시설 법정 기술진단 실시 : 삼기대제 1개소 10,560천원

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 : 익산공공 외 4개소 4,900천원

◦ 소규모 수질검사 측정대행 용역 : 여산 외 21개소 173,941천원

□ 하반기 추진계획

◦ 공공하수처리시설 내진성능평가 용역 : 익산공공 1개소 115,567천원

◦ 수질TMS 위탁관리 용역 : 익산공공 외 3개소 300,000천원

◦ 익산공공하폐수처리시설 관리대행(민간위탁) : 2,627,503천원

5		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 비 : 2,400백만원

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사업내용

▸ 시민 불편 하수도 시설물 개선 등 소규모 숙원사업 추진

▸ 하수관 내 퇴적토, 슬러지 준설, 하수관로 연결 등 생활민원 처리

□ 상반기 추진실적

◦ 소규모 공사 약70건 시행 완료 및 생활민원처리 약1,000건 시행

◦ 침수 우려 지역 12개소 및 하수찌꺼기 등의 퇴적물로 인해 원활한

하수배제를 위한 준설 약100개소 L=15km(650ton) 완료

□ 하반기 추진계획

◦ 하수도 시설물 보수 및 유지관리 시행	: 2019. 12.

▸ 지속적인 하수도 시설물 소파 보수, 관로 주변 파손 도로 복구 등

시민 불편 사항 신속 대응

▸ 강우 시 저지대 등의 상습적인 침수 지역 및 하수도 찌꺼기로 인한 악취 발생 예방을 위한 준설 실시

6		유천생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 2 ~ 2019. 12.

◦ 사업내용 : 수목 정비, 초화류 식재, 그 밖의 시설물 관리 등

◦ 사 업 비 : 190백만원 (시비)

□ 상반기 추진실적

◦ 유천생태습지 모니터링용역 시행	: 2019. 03. ~ 12.

◦ 유천생태습지 주변 청소용역 시행	: 2019. 03. ~ 12.

◦ 관목식재 시행 (영산홍 900주)	: 2019. 03.

◦ 노후 지주목 제거 및 제초작업 시행	: 2019. 05.

◦ 목재시설물 오일스텐칠 도색 실시	: 2019. 05.

□ 하반기 추진계획

◦ 예초작업 시행 (2회)	: 2019. 06. ~ 09.

◦ 친환경 생태놀이시설 설치 (7월)	: 2019. 06. ~ 09.

▸ 유치원 및 가족단위 방문을 위한 친환경 놀이시설 설치

◦ 수목식재 (150주)	: 2019. 07. ~ 10.

◦ 야간 디자인 경관 조명(1식)	: 2019. 07. ~ 10.