2019. 10.

제220회 익산시의회(임시회)

2019 주요업무 결산보고

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 예산집행실적
□	2019 주 요 성 과
□	2019 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	하수관로정비사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전 정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지 조성

일  반  현  황

□ 기          구

							하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리				지하수			폐수처리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	32	1	8	6	8	9
현 원	30	1	7	13	6	3
증 감	▵2		▵1	7	▵2	▵6

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 마을하수처리시설 운영 및 유지관리, 하수중계펌프장 운영 및 유지관리, CSOs 운영 및 유지관리, 유천 생태습지 유지관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과
◦	폐수처리 :	공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영관리, 산업단지 폐수 유입 승인, 배수설비 신고, 비용부담금 부과징수 등

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2018. 12.	비 고
시설	총인구	천명	294
	하수인구	천명	269
	보급률	%	91.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	118,531
	1일평균하수처리량	톤	116,184
	하수처리율	%	98.0
하수도 사용	개소수	전	39,783
	톤당 평균요금	원	695.8

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	28	145,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
제3일반산업단지 공동폐수처리시설	1	5,500㎥/일	직영

2019 예산집행실적

【 2019. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	관	항	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
하수도과				70,226,637	36,563,452	33,663,185	52.1
	하수도사업비용			37,655,135	29,727,174	7,927,961	78.9
		영업비용		37,473,620	29,726,416	7,747,204	79.3
			관거비	15,416,165	12,746,705	2,669,460	82.7
			펌프장비	469,549	204,787	264,762	43.6
			처리장비	17,953,875	14,355,087	3,598,788	80.0
			일반관리비	3,634,031	2,419,837	1,214,194	66.6
		영업외비용		2,800	758	2,042	27.1
			차입금이자상환	2,800	758	2,042	27.1
		예비비		178,715	-	178,715	-
				178,715	-	178,715	-
			예비비
	자본적지출			32,571,502	6,836,278	25,735,224	21.0
		유형자산취득		28,653,659	5,789,464	22,864,195	20.2
			구축물	27,907,493	5,431,004	22,476,489	19.5
			기계장치	289,000	157,357	131,643	54.4
			차량운반구	20,000	19,746	254	98.7
			공기구비품	11,850	11,363	487	95.9
			건설중인자산	425,316	169,994	255,322	40.0
		비가동설비자산취득		970,500	790,297	180,203	81.4
				970,500	790,297	180,203	81.4
			건설중인자산
		비유동부채상환		177,200	132,900	44,300	75.0
			정부차입금원금상환	177,200	132,900	44,300	75.0
		기타자본적지출		1,196,874	123,617	1,073,257	10.3
			정부보조금반환	1,196,874	123,617	1,073,257	10.3
		예비비		1,573,269	-	1,573,269	-
			예비비	1,573,269	-	1,573,269	-

2019 주요성과

□ 성      과

◦ 2020년 노후하수관로 정비 관련 국고보조 신규 사업 확정

‣ 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 국비 5,000백만원 확보

‣ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 국비 397백만원 확보

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

▸ 춘포 쌍정·반도·궁월지구 하수관로 정비공사 추진

- 관로정비 3.1km, 배수설비 109가구 (공정율 90%)

▸ 시내일원 분류식관로 배수설비 설치공사

- 함열서부3처리분구 외 8건 배수설비 119가구 설치완료

▸ 남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비공사 추진

- 관로정비 30.5km, 배수설비 2,646가구 (공정율 10%)

◦ 공공하수처리장 기능보강 등 효율적 관리를 통한 수질환경개선

▸ 여산처리장 외 9개소 기능보강공사 및 삼기대재 1개소 기술진단 실시

◦ 하수찌꺼기 감량화 사업 추진을 위한 재원협의 완료 및 시설공사 착공

▸ 사업비(58.24억원) 추가확보 및 소화가스설비 우선시공으로 악취방지

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

▸ 소규모 공사 41건 완료 및 생활민원처리 131건 완료

▸ 시내일원 침수우려지역 12개소 등 하수도(L=25km) 기계준설 완료

▸ 생활민원 처리를 위한 비상근무조 운영 : 1,910건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 전북지방환경청 점검 시 소규모 하수처리장 방류수 수질기준 초과

‣ 삼기대제(총질소 등), 웅포강변(BOD 등) 과태료 320만원 납부

2019 주요업무 결산

		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 익산시 하수도정비 기본계획 수립용역 하수찌꺼기 감량화 사업 공공하수처리시설 운영관리 소규모 하수도관련 주민숙원사업 유천생태습지 유지관리

1		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 남부2처리분구 (동산동 · 인화동 · 평화동 일부)

남부3처리분구 (금강동 · 신흥동 · 용제동 일부)

북부2처리분구 (영등1동 · 영등2동 · 신용동 일부)

◦ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2022. 12.

◦ 총사업비 : 36,490백만원(국비 25,543, 도비 1,094, 시비 9,853)

▸‘19년도 예산 - 6,182백만원(국비 4,328, 도비 185, 시비 1,669)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=30.5km, 배수설비 2,646가구

□ 추 진 실 적

◦ 시설공사 입찰 의뢰(시⇒조달청)	: 2019. 02. 12.

◦ 건설사업관리용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 04. 26.

◦ 시설공사 착공  [㈜성지건설]	: 2019. 05. 29.

◦ 건설사업관리용역 착수  [㈜삼안]	: 2019. 05. 31.

□ 마무리 계획

◦ 시설공사 시행	: 2019. 06. ~ 2022. 12.

◦ 건설사업관리 용역 시행	: 2019. 06. ~ 2022. 12.

◦ 하수도사용개시 및 국비정산 보고	: 2023. 01.  ~ 2023. 03.

2		익산시 하수도정비 기본계획 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 6.

◦ 사업내용 : 하수도 기본현황 조사 및 정비기본계획 수립 1식

◦ 총사업비 : 1,800백만원 (시비)

▸‘19년도 예산 - 800백만원

□ 추 진 실 적

◦ 기본계획수립용역 익산시 계약심사	: 2019. 02. 21.

◦ 기본계획수립용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 05. 14.

◦ 기본계획수립용역 착수 [㈜유신]	: 2019. 07. 30.

□ 마무리 계획

◦ 하수도정비기본계획(안) 작성 및 검토 협의	: 2019. 06. ~ 2020. 07.

※ 전라북도 새만금수질개선과, 전북지방환경청 환경관리과

◦ 하수도정비기본계획(안) 승인 [환경부]	: 2020. 하반기 중

3		하수찌꺼기 감량화사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

◦ 총사업비 : 26,844백만원(국비70%, 도비15%, 시비 11.2%, 기금3.8%)

▸‘19년도 예산 - 1,960백만원(국비1,372 도비294 시비216 기금78)

◦ 사업내용

▸ 스팀방식 변경, 드럼스크린 교체, 탈취커버, 가스저장탱크 교체 등

▸ 소화조(6,692㎥/일), 탈취시설, 기계식 농축시설, 가스 정제설비 등 신설

□ 추 진 실 적

◦ 환경부 재원협의 및 총사업비 변경	: 2019.  5.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2019.  6.

◦ 공유재산심의 및 경관심의	: 2019.  7. ~ 8.

◦ 전라북도 공공하수처리시설 설치(변경)인가	: 2019.  8.

◦ 설계의 안전성 검토	: 2019.  8.

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 착공	: 2019.  8.

□ 마무리 계획

◦ 준  공	: 2021. 12.

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설 : 27개소

시설명	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	익산	북부	함열	금마	분뇨
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	90개소	100,000	30,000	6,000	1,100	150
운영방식	직 영		직영77 위탁13	위탁운영[(주)전북엔비텍BTO, 2008.~2028.]

◦ 직영시설 관리인원 : 4명(전기운영1, 기계운영1, 열관리운영1, 시설관리1)

◦ BTO위탁운영비 예산 : 149억원(도비 5.9억원 / 시비 123.1억원)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개항목)

▸ 익산 외 4개소(일1회), 소규모 12개소(주1회), 소규모 9개소(월1회)

▸ 소규모하수도시설 및 중계펌프장 운영 관리 : 주1~2회 수시점검

◦ 공공하수처리시설 기능보강 실시	여산 외 9개소 55,721천원

◦ 공공하수처리시설 법정 기술진단 실시	삼기대제 1개소 10,560천원

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사	익산공공 외 4개소 9,680천원

◦ 소규모 수질검사 측정대행 용역 추진	여산 외 21개소 201,657천원

◦ 익산하수 3중계 스크류펌프 교체 공사	1건 321,790천원

◦ 하수처리시설 슬러지 준설작업 및 청소	25회 20,742천원

◦ 익산하수 3중계 탈취설비 교체공사 추진	1건 495,000천원

◦ 익산공공하수처리시설 내진성능평가 용역 추진	1건 110,000천원

□ 마무리 계획

◦ 익산하수 3중계 탈취설비 교체공사 준공	: 2019. 11.

5		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 비 : 2,383백만원

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

▸ 시민생활에 불편한 하수도 슬러지 준설, 하수관로 연장, 맨홀단차 등 생활의 불편을 주는 민원에 대하여 주민숙원사업 처리

◦ 사업개요	83건 / 2,383백만원

▸ 소규모 주민 숙원 사업                    :  62건 / 2,240백만원

▸ 생활환경개선사업                         :  21건 /   143백만원

□ 추 진 실 적

◦ 소규모 주민숙원사업

▸ 읍면동지역 하수도 시설 및 준설(53건) 추진	: 1,901백만원

◦ 읍면동 주민예산편성사업(17건) 추진	: 112백만원

□ 마무리 계획

◦ 소규모 주민숙원사업(9건) 추진	: 339백만원

▸ 읍면동 하수도 시설공사 및 하수도 슬러지 준설 등

◦ 읍면동 주민예산편성사업(4건) 추진	: 31백만원

▸ 용동면 대조마을 하수도 정비공사 외 3건

6		유천생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 시설규모 : 생태습지 A=134,521㎡, 생태하천 0.9km

◦ 사업내용 : 수질관리, 수목 및 잔디관리, 시설물 보강공사 등

◦ 사업기간 : 연 중

◦ 사 업 비 : 350백만원

ᷮ 추 진 실 적

◦ 유천생태습지 청소용역 발주	2019. 2.  ~ 2019. 12.

◦ 생태하천복원사업 모니터링 용역 추진	2019. 2.  ~ 2019. 12.

◦ 유지관리공사 및 주민편익시설 보강	2019. 2.  ~ 2019. 09.

▸ 지주목제거, 표지판설치, 제초공사, 예초공사, 해충방제용역, 목재시설물보수공사, 수로사면복구공사, 친환경 생태놀이시설 설치

ᷮ 마무리 계획

◦ 유지관리공사 및 주민편익시설 보강	2019. 10. ~ 2019. 12.

▸ 예초, 수목식재, 전정, 가로등, 조명구조물(디자인) 공사 시행예정

- 사 업 비  : 190백만원(시비)