2019. 10. 28.

제220회 익산시의회(임시회)

2019 주요업무 결산보고

	경제관광국

한류패션과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 예산집행실적
□	2019 주 요 성 과
□	2019 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
대한민국 최고의 보석 도시 익산

		전 략 목 표
◦ ◦	국내복귀기업과 익산주얼리 기업의 상생 발전 및 도약 한류패션문화 산업화를 통한 고부가가치화

		중 점 과 제
◦ ◦	국내복귀기업 유치 및 조기정착 지원 제조, 판매, 관광 연계를 통한 귀금속보석산업의 집적화

일  반  현  황

□ 기          구

															한 류 패 션 과
한류패션																									보석산업

□ 정 ․ 현 원

(정원/현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	8	0	1	2	3	2	0
현 원	8	0	1	3	1	1	2
증 감	0	0	0	1	△2	△1	2

□ 사  무  분  장

◦ 한류패션 : 국내복귀기업 등 유치 및 지원

▸국내복귀기업 및 수도권 기업 유치

▸주얼리 국내복귀기업 조기정착 지원

▸익산 패션주얼리 공동연구개발센터, 주얼리 집적산업센터 운영

▸주얼리 국내복귀기업 인력 지원

◦ 보석산업 : 귀금속보석산업 육성

▸귀금속보석산업 클러스터 조성사업 추진

▸왕궁 보석가공단지 기반시설 조성

▸주얼팰리스 운영 및 보석축제 지원

▸귀금속보석산업 활성화 지원

2019 예산집행실적

【 2019. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
한류패션과				8,548,312	4,763,303	3,785,009	55.7
	한류패션산업조성			8,514,031	4,732,896	3,781,135	55.6
		국내복귀기업지원		5,828,410	3,287,549	2,540,861	56.4
			한류패션유치 및 지원	112,339	29,430	82,909	26.2
			익산패션주얼리공동R&D센터 운영	702,939	702,939	0	100
			국내복귀기업 주얼리 집적산업센터 운영	100,720	78,370	22,350	77.8
			지역산업맞춤형일자리창출지원사업	171,112	88,360	82,752	51.6
			주얼리국제공인 시험기관인증사업	500,000	500,000	0	100
			2019년제품안전 인프라구축사업	429,000	429,000	0	100
			주얼리 임대공장 건립사업	3,027,300	679,545	2,347,755	22.4	명시이월 97,300
			주얼리단지임대공장조성	785,000	779,905	5,095	99.4
		보석산업도약과발전		2,685,621	1,445,347	1,240,274	53.8
			귀금속보석산업활성화지원	1,315,752	137,141	1,178,611	10.4
			익산귀금속보석 전시판매센터관리	53,500	51,000	2,500	95.3
			귀금속보석클러스터조성	1,294,961	1,245,473	49,488	96.2	계속비이월1,294,961
			귀금속보석클러스터운영	21,408	11,733	9,675	54.8
	행정운영경비			12,724	8,850	3,874	69.6
		기본경비		12,724	8,850	3,874	69.6
			기본경비	12,724	8,850	3,874	69.6
	재무활동			21,557	21,557	0	100
		보전지출		21,557	21,557	0	100
			보전지출	21,557	21,557	0	100

2019 주요성과

□ 성      과

◦ 국내복귀 등 기업유치

▸ 주얼리 임대공장 입주 투자협약 체결(2019. 2월)

- LK주얼리㈜(대표 김영남), 금정공예품(유)(대표 김광제)

▸ 주얼리집적산업센터 입주 : 안쥬얼리 등 11개 기업 15실

◦ 패션단지 기업하기 좋은 환경 조성 및 지원

▸ 주얼리 임대공장 건립사업 착공 : 설계완료(7월), 공사착공(9월)

- 건축규모 : 2동, 1층, 철골조, 연면적 합계 1,998㎡(999㎡×2동)

▸ 패션단지 폐수관로 설치공사 준공(2019. 5월)

- 폐수처리동 인입 폐수관로 설치(L=846m, 사업비 212,000천원)

▸ 제품안전인프라구축사업 추진 : 수행협약(3월), 장비구축(6월~10월)

▸ KOLAS 공인시험기관 인증사업 추진 : 신청(5월), 문서심사(9월)

▸ 주얼리로봇 자동화공정기술개발 등 기업연구개발과제 지원(2건)

▸ 도금장 책임경영으로 도금 품질 안정화(3개기업)

▸ 익산제3산단 통근버스 운행(180명/일 이용)

- 출・퇴근 4개노선 각1회/일, 야간 2개노선 각1회/일

◦ 귀금속보석산업 활성화 지원사업

▸ 보석대축제(봄) 보조금 지원(25,000천원) (2019.4월)

▸ 2019년도 귀금속보석 우수제조업체「㈜헤리노브」선정(2019.4월)

▸ 국제보석전시회 참가업체 지원(22,000천원)(2019. 9. 18. ~ 9. 22.)

◦ 왕궁보석가공단지 기반시설 조성사업

▸ 왕궁 보석가공단지 기본계획 수립 및 건축경관 시행지침용역 : 2019. 9.          ▸ 지구단위계획 결정(변경) 도시건축공동위원회 심의      : 2019. 9.

□ 반      성

◦ 전북디자인센터 귀금속장비 운영 미흡

▸ 장비운영 인력 2명 채용(6월 1명 채용, 10월중 추가 1명 채용)

▸ 귀금속장비 이용료 책정 및 작동 교육           : 9월

▸ 장비 시험운영 및 홍보                         : 10월 ~ 12월

2019 주요업무결산

		패션단지 기업유치 및 지원 익산 패션주얼리 공동연구개발센터 운영 귀금속보석산업 활성화 지원사업 왕궁보석가공단지 기반시설 조성사업

1		패션단지 기업유치 및 지원

□ 사 업 개 요

◦ 패션단지(제3일반산업단지내 / 2012년 조성)

(단위 : ㎡ / 필지)

총면적	유 치 (분양・임대)					미분양	분양률
	소계	지원시설	기업분양	임대공장	투자협약
168,167/32	86,333/16	20,782/2	53,256/10	6,915/2	5,380/2	81,834/16	51.3%

◦ 주얼리집적산업센터(아파트형 공장 / 2016년 준공)

(단위 : 기업 / 실)

시 설 현 황(실)			입 주 현 황			입주율
계	공장	상가	계	공 장	상 가
45	37	8	25 / 35	22 / 32	3 / 3	78%

□ 추 진 실 적

◦ 주얼리 임대공장 건립사업 추진(999㎡×2동)         : 2019. 2. ~

▸ 설계 착수(3월), 설계 납품(7월), 공사 착공(9월) *공사기간 5개월

※2019.2. 입주협약 : LK주얼리㈜(대표 김영남), 금정공예품(유)(대표 김광제)

◦ 패션단지 관심 기업 및 바이어 방문                : 2019. 7~

▸ 국내 복귀관심기업(5개사) 바이어(미국 2개사) 자발적 방문

◦ 주얼리집적산업센터 입주 : 안쥬얼리 등 11개 기업 15실

◦ 패션단지 폐수관로 설치공사 준공                  : 2019. 5.

▸ 폐수처리동 인입 폐수관로 설치(L=846m, 사업비 212,000천원)

◦ 익산제3산단 통근버스 운행(180명/일 이용)

▸ 출・퇴근 4개노선 각1회/일, 야간 2개노선 각1회/일

◦ 산업통상자원부 주얼리 분야 간담회 개최 : 2019. 6. 27.

▸ 내용 : 주얼리 수출 기업의 금융, 마케팅, 유턴기업의 애로 청취

□ 마무리 대책

◦ 주얼리 임대공장 건립사업 준공(2020. 2월)

◦ 제3산단 통근버스 운행 국비지원사업 종료에 따른 대책마련(11월중 재공모)

◦ 패션단지 관심기업 유치 활동 및 바이어 대상 홍보 강화

2		익산 패션주얼리 공동연구개발센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 낭산면 산단구평길 102-35

◦ 규    모 : 연구동 2,563.27㎡, 도금동․폐수처리동 2,903.11㎡

◦ 운영방법 : 민간위탁 / 수탁자 : 한국주얼리협동조합(대표 정윤희)

◦ 위탁기간 : 2017. 5. 1. ~ 2020. 4. 30.

◦ 위탁내용  : 익산패션주얼리 공동연구개발센터 운영․관리

◦ 지원예산 : 1,571,000천원                          (단위 : 천원)

구분	계	위탁금	KOLAS 국제공인시험	제품안전인프라구축
계	1,571,000	642,000	500,000	429,000
국비	300,000	0	0	300,000
도비	150,000	0	150,000	0
시비	1,121,000	642,000	350,000	129,000

□ 추 진 실 적

◦ 제품안전인프라구축사업 심의 및 사업수행협약 체결   : 2019. 3.

◦ KOLAS 공인시험기관 인증사업 평가 신청              : 2019. 5.

▸ KOLAS 공인시험기관 인증사업 문서심사 완료(2019.  9.)

◦ 패션단지 입주기업 지원 등 연구개발과제 공모사업 선정(2건)

▸ 주얼리 로봇 자동화(하이쥬얼), 와이어 제조공정 개선(익산체인)

◦ 화학안전 시설개선 추진 공사 착공                   : 2019. 9.~

◦ 도금동 3개사 책임경영 시행 및 도금 품질 확보 등 기업 지원

▸ 고가(1개사), 저가(2개사) 경영 / 도금액물 105건 등 203건 시험분석

□ 마무리 대책

◦ 제품안전인프라구축사업 및 KOLAS 국제공인시험기관 인증사업 완료(12월)

◦ 민간위탁 동의안 의회제출(10월)

◦ 화학안전 시설개선사업 완료 및 설치검사 신청(환경관리공단) : 2019. 11.

3		귀금속보석산업 활성화 지원사업

□ 사 업 개 요

◦ 주얼팰리스 활성화를 위한 보석대축제 지원

▸ 사 업 비 : 50,000천원(봄, 가을 축제)

▸ 내    용 : 보석카페 및 보석가공시연, 보석리세팅 (뉴디자인교체),

보석체험부스, 축제 연계한 셔틀버스 운영 등

◦ 우수제조업체 지원

▸ 사 업 비 : 17,464천원(4개업체)

▸ 내    용 : 시제품개발비 지원, 개별 제조업체 홍보책자 제작 등

◦ 국제보석전시회 참가업체 지원

▸ 사 업 비 : 22,000천원(전북도와 익산시 7:3 부담)

▸ 지원방법 : 한국무역협회 전북지역본부에 보조금 교부하고, 전시회  참가                       업체 선정 및 사업추진은 한국무역협회 전북지역본부 주관

▸ 내    용 : 해외전시회 부스 공간 임차비 및 특별관 설치비용 지원

□ 추 진 실 적

◦ 주얼팰리스 활성화를 위한 보석대축제 지원       : 2019. 4.

▸ 사 업 비 : 25,000천원(봄 축제)

▸ 내    용 : 보석체험 부스설치, 보석리셋팅, 보석할인 행사 등

◦ 2019년 우수제조업체 선정                        : 2019. 4.

▸ 선정업체 : ㈜헤리노브(영등동 1공단 소재)

▸ 내    용 : 인증서 및 인증현판 수여

우수제조업체 제품개발비 지원(4개업체 4,000천원)

◦ 국제보석전시회 참가업체 지원(22,000천원)         : 2019. 9.

▸ 홍콩 국제보석전시회(2019. 9월 18일 ~ 22일) / 8개 업체 참가

□ 마무리 대책

◦ 우수제조업체(팸플릿․리플릿 제작 및 귀금속전문지 게재)    : 2019. 10.~11.

◦ 보석대축제(가을) 지원(25,000천원)                   : 2019. 10.

4		왕궁보석가공단지 기반시설 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 동용리 775번지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2020년

◦ 사업면적 : 27,043㎡

◦ 총사업비 : 1,180,000천원(특600,000  시580,000)

◦ 사업내용 : 보석가공단지 기반시설 조성

▸ 지구단위계획 변경(공장용지 → 근린생활시설 용지 / 필지 분할)

▸ 내부도로 및 상하수도 관로 개설, 가로등 설치 등

▸ 필지분할 및 매각

□ 추 진 실 적

◦ 지구단위계획 변경 관련 실무자 회의(도시개발과) 3회 : 2019. 2. ~ 4.

▸ 미매각 필지 분할 및 지원용지 계획 검토, 기본 시행지침(건축 및 경관) 검토

◦ 왕궁보석가공단지 기본계획 수립                   : 2019. 4.

◦ 건축·경관 시행지침 용역 추진                     : 2019. 6. ~ 9.

◦ 지구단위계획 결정(변경) 도시건축공동위원회 심의   :  2019. 9.

□ 마무리 대책

◦ 지구단위계획변경 결정(변경) 고시            : 2019. 10.

◦ 미매각필지 감정평가 및 분할 매각 추진       : 2019. 10. ~ 12.

◦ 기반시설조성 실시설계 및 공사 추진          : 2019. 10. ~ 2020. 3.