2020. 1.

제222회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 계획

	건설국

도시개발과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 주요성과 및 반성
□	2020 주 요 업 무 계 획
□	특수시책

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 행복한 품격도시 익산건설을 위한 시민중심의 도시계획과 개발 및 관리

		전 략 목 표
◦	미래지향적인 도시계획 수립
◦	인간과 환경을 중시하는 도시개발
◦	시민중심의 도시문제 해소

		중 점 과 제
◦	시민이 공감하는 도시계획으로 지역 간 균형발전 도모
◦	시민중심의 도시개발로 품격도시 익산건설

일  반  현  황

□ 기          구

					도시개발과
도시행정			도시계획					도시개발				경영개발

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	1	4	6	5	2
현 원	19	1	1	6	5	3	3
증 감	-	-	-	2	△1	△2	1

□ 사  무  분  장

	◦	도시행정	:	국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 개발행위 허가
	◦	도시계획	:	도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정
	◦	도시개발	:	도시계획 도로개설 사업 시행
	◦	경영개발	:	부송4지구 개발 및 익산 일반산업단지 도로개설

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.925	76.089	214.813	194.070	21.954
비율(％)	100	15.0	42.4	38.3	4.3

□ 도시지역 내 용도지역

(단위 : ㎢)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	76.089	17.818	1.870	10.471	45.930
비율(％)	100	23.4	2.4	13.8	60.4

□ 도시지역 내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	경관 지구	미관 지구	고도 지구	방화 지구	보존지구 (역사문화환경 보존지구)	취락지구 (자 연 취락지구)	비고
지구수	176	32	6	9	1	83	45
면 적	27,127	15,158	935	1,202	202	2,736	6,894

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : ㎡)

시 설 명		시설결정		집행시설		미집행시설		집행률 (%)
		개소	면적	개소	면적	개소	면적
총 계		1,949	31,837,770	1,797	26,426,185	152	5,411,585	83.0
도로	소 계	1,371	12,021,275	1,263	11,365,643	108	655,632	94.6
	광 로	6	1,245,244	5	1,160,250	1	84,994	93.2
	대 로	68	4,171,693	44	3,807,930	24	363,763	91.3
	중 로	331	4,231,300	314	4,116,097	17	115,203	97.3
	소 로	966	2,373,038	900	2,281,366	66	91,672	96.1
공원	소 계	105	5,857,066	83	1,769,180	22	4,087,886	30.2
	근린공원	50	5,219,739	31	1,348,683	19	3,871,056	25.8
	역사공원	2	76,461	1	50,593	1	25,868	66.2
	수변공원	2	28,058	1	8,512	1	19,546	30.3
	어린이공원	39	91,130	39	91,130	0	0	100
	소공원	10	36,659	10	36,659	0	0	100
	문화공원	1	35,279	1	35,279	0	0	100
	묘지공원	1	369,740	0	198,324	1	171,416	53.6
녹지	소 계	99	1,186,406	84	572,798	15	613,608	48.3
	완충녹지	79	1,122,150	65	512,112	14	610,038	45.6
	경관녹지	16	58,496	15	54,926	1	3,570	93.9
	연결녹지	4	5,760	4	5,760	0	0	100
기타	소 계	374	12,773,023	367	12,721,607	7	51,416	99.6
	주차장	49	149,033	49	149,033	0	0	100
	광 장	32	677,209	27	666,100	5	11,109	98.4
	공공청사	15	196,097	15	196,097	0	0	100
	유원지	1	31,200	0	0	1	31,200	0.0
	운동장	1	260,000	0	250,893	1	9,107	96.5
	기 타	276	11,459,484	276	11,459,484	0	0	100

2019 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 시민과 함께하는 익산시 도시기본계획 수립

▸2035년 익산시 도시기본계획 수립을 위한 시민계획단 회의 개최 : 65명 / 5회

▸익산시 미래상 확정 및 실현을 위한 분과별 목표 도출

▸도시기본계획(안) 작성	: 2019.  7. ~

◦ 도시계획도로 개설을 통한 시민 편익증진 기여

▸춘포면사무소 ~ 춘포역간 도로개설 공사 준공	: L=168m, B=12m

▸용안면 한양식당 옆 도로개설 공사 준공	: L=140m, B= 8m

▸모현동 롯데슈퍼 옆 도로개설 공사 준공	: L= 96m, B= 8m

▸신동(소로3류101호) 도로개설 공사 준공	: L= 46m, B= 6m

◦ 부송4지구 도시개발사업 전라북도 도시계획위원회 심의 통과

▸부결사유를 보완하여 道 도시계획위원회 상정	: 2019.  4.

▸道 도시계획위원회 심의 통과	: 2019.  5.

▸지구지정 및 개발계획 결정고시	: 2019.  6.

▸도시개발사업 업무협약 체결(전북개발공사)	: 2019.  12.

◦ 익산 일반산업단지 진입도로 개설공사 추진

▸6차분 공사 준공	: 2019.  4.

▸7차분 공사 착공	: 2019.  5.

□ 반      성

◦ 도시계획도로 개설공사 사업추진 시 협의보상에 따른 사업지연

▸신속하고 적극적인 업무추진으로 사업이 적기에 마무리 될 수 있도록 노력하겠음.

		도시기본계획 수립용역 지구단위계획 재정비 수립용역 마한로 미개설구간 도로개설 익산대로10길 도로확･포장 익산 일반산업단지 진입도로 개설공사 부송4지구 도시개발사업

2020 주요업무계획

1		도시기본계획 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 익산시 행정구역 전체

◦ 기    간 : 2019. ~ 2020.

◦ 용 역 비 : 914백만원

◦ 주요내용

▸익산 도시기본계획의 타당성 등을 전반적 재검토 및 정비하는 것으로 익산시 도시여건을 반영한 지역적 특성 및 계획방향·목표 설정

▸도시성장 추세를 대비한 도시공간을 재진단하고 사회적 여건변화에 따른 도시정책방향 재점검

▸도시공간구조, 생활권 설정 및 인구의 배분, 토지이용계획 수립 등

□ 추 진 계 획

◦ 국토계획평가(국토교통부)	: 2020.  1. ~  3.

◦ 주민공청회, 시의회 의견청취, 도시계획위원회 자문 : 2020.  4. ~  8.

◦ 전라북도 승인신청	: 2020.  9.

◦ 도시기본계획 공고	: 2020. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도·농 균형발전과 미래지향적인 도시로의 성장을 위한 중장기 발전 전략 수립으로 지역발전을 위한 기틀마련

2		지구단위계획 재정비 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2019. ~ 2020.

◦ 용 역 비 : 600백만원

◦ 주요내용

▸기존 지구단위계획의 타당성검토 및 재정비

▸교통영향평가, 경관성검토 등 기초조사를 통한 대상지 여건 분석 등

◦ 대상지역

연번	지구단위계획명	위 치	면적(㎡)	계획수립일	비 고
1	영등1차지구	영등동	339,135	2004. 9.10	도시지역
2	영등2차지구	영등･어양동	951,493	2000.12.29	도시지역
3	부송3차지구	부송동	248,505	2000.12.29	도시지역
4	마동지구	마동	446,695	2004. 9.10	도시지역
5	목천취락지구	목천동	441,224	2002. 8.14	비도시지역
6	함라취락지구	함라면	309,150	2002. 8.14	비도시지역

□ 추 진 계 획

◦ 지구단위계획 결정(변경)(안) 작성	: 2020.  1. ~  5.

◦ 행정절차 이행	: 2020.  5. ~ 10.

▸주민공람공고, 관계기관 협의, 도시건축공동위원회 심의

◦ 지구단위계획 결정 및 지형도면고시	: 2020. 10. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 택지개발사업 준공 후 10년이 경과된 지역과 도시 외 지역에 지정된 취락지구에 대하여 대상지 여건을 반영한 지구단위계획 정비를 통해 체계적이고 계획적인 토지이용 및 관리 도모

3		마한로 미개설구간 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 어양동 409-5번지(어양 변전소) 일원

◦ 사업기간 : 2011. ~ 2021.

◦ 사업내용 : 도로개설 L=520m, B=25m(대로3류14호)

▸1차분 L=230m, 2차분 L=120m, 3차분 L=170m

◦ 총사업비 : 8,520백만원(공사비 3,842ㆍ보상비 4,678)

(단위 : 백만원)

구분	총 계	2019년 까지	2020년	2021년 이후
총계	8,520	7,231	1,289	-
특별교부세	900	900	-	-
시비	7,620	6,331	1,289	-

□ 추 진 계 획

◦ 3차분 편입 토지 보상	: 2020.  1. ~ 6.

◦ 3차분 공사 착공(잔여분)	: 2020.  7.

◦ 2차분 공사 준공	: 2020. 11.

□ 기 대 효 과

◦ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

4		익산대로10길(대로3류26호) 도로확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 인화동 1가 1-18번지 ~ 79-10번지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2021. 12.

◦ 사업내용 : 도로확포장 L=215m, B=6m→25m(대로3류26호)

◦ 총사업비 : 9,800백만원(공사비 2,800 보상비 7,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2019년 까지	2020년	2021년 이후
계	9,800	3,351	1,503	4,946
시비	9,800	3,351	1,503	4,946

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 및 지장물 보상	: 2020. 1. ~ 12.

▸ 20필지 2,128㎡

◦ 공사착공 및 준공	: 2021. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

5		익산일반산업단지 진입도로 개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 낭산면 구평리(일반산단) ~ 논산시 연무읍(연무IC)

◦ 사업기간 : 2010. ∼ 2021.

◦ 사업내용 : 진입도로 개설공사 L=11.86km B=20m

◦ 총사업비 : 188,652백만원(국비 90,616 지방비 98,036)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자액	2019년	2020년	2021년 이 후	비 고
계	188,652	110,216	17,500	26,600	34,336
국 비	90,616	80,816	2,000	4,300	3,500
지방비	98,036	29,400	15,500	22,300	30,836

□ 추 진 계 획

◦ 7차분 공사준공	: 2020. 1.

◦ 2021년 국가예산 확보 추진	: 2020. 1. ~ 11.

◦ 8차분 공사추진	: 2020. 2. ~ 12.

◦ 9차분 공사추진	: 2021. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 산업단지 입주기업의 물류･수송비용 절감으로 기업경쟁력 강화 및 산업단지 활성화에 따른 지역균형 발전도모

6		부송4지구 도시개발사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 부송동 일원(신재생자원센터 주변)

◦ 사업기간 : 2011. ~ 2021.

◦ 사업내용 : 주거용지(단독, 공동 등), 상업용지, 공공시설(도로, 공원 등)

◦ 사업규모 : 294,281㎡(약 9만평)

◦ 총사업비 : 37,900백만원
(공사비 19,700 보상비 9,400 설계비 3,800 부담금 5,000)

◦ 시행방법 : 도시개발법에 의한 환지방식

□ 추 진 계 획

◦ 영향평가(환경 등) 및 실시계획 완료	: 2020.  6.

◦ 환지계획 인가(실시설계 등) 완료	: 2020.  6.

◦ 사업시행자 지정 및 인수인계	: 2020.  6.

◦ 공사착수	: 2020.  7. ~

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 및 제3일반산업단지의 배후도시 역할

◦ 아파트 고분양가에 따른 인구감소 해소