2020. 1.

제222회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 계획

	건설국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 주요성과 및 반성
□	2020 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	20		1	4	9	4	2
현 원	20		1	6	9	3	1
증 감	-		-	2	-	△1	△1

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	건설과 소관 용지매입, 토지수용 재결, 소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등, 사업관련 협의, 시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업 추진
	◦	하천시설	:	하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업
	◦	하천관리	:	하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과, 생태하천관리
	◦	가로등관리	:	가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	154.779	168.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	28.169	74.034	27%

□ 하천점용허가 현황(2019년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
513	439	59	15	256,095	243,831	12,184	80

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
28,622등	19,379등	9,243등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2019 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 농어촌도로 확포장을 통한 통행불편 해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민 편익 증대

▸공사 완료사업 : 2개소

- 용동 삼정~두무간 도로확포장공사(L=1.21㎞, B=8.0m)	: 2019. 3. 26.

- 용동 흥왕마을 진입로 확포장공사(L=0.3㎞, B=6.0m)	: 2019. 7. 18.

▸공사 착공사업 : 3개소

- 용안 창리~법성간 도로확포장공사 (L=0.84㎞, B=8.0m)

- 오산제일교회~정각사간 도로확포장공사 (L=0.4㎞, B=8.0m)

- 왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사 (L=0.6㎞, B=8.0m)

◦ 교통사고 위험지역 위험도로 구조개선 (회전교차로 설치 및 선형개량)

▸공사 추진 사업 - 용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업

▸공사 완료 사업 - 삼기산사거리 회전교차로 설치사업 : 2019. 11. 14

▸실시설계 신규 추진 사업 - 왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업

◦ 평화육교 재가설을 통한 안전성 확보와 KTX호남고속철도의 안전한 교통망 구축

▸대체우회도로 설치(L=1.1km, 4차로), 평화육교 철거

※ 전체 공정율 53.0% (19년 12월말 기준)

◦ 대판천 소하천정비공사 완료(‘19.8.29.)

▸사업비 : 25억원, 사업내용 : 교량 재가설(5개소), 호안정비(1.2㎞) 등

◦ 도로조명 개선

▸노후가로등 정비 - 177개소,  보안등 교체 및 설치 - 574개소

▸가로등·보안등 민원처리  6,339건

□ 반      성

◦ 동면천 하천기본계획 확정 지연(익산지방국토관리청)으로 예산집행 등 사업추진이 부진하였으나 편입토지 협의보상을 우선 시행하여 조속한 사업추진을 도모하겠음.

2020주요업무계획

		시·군도 및 농어촌도로 확포장 군도23호선 도로 확·포장공사 평화육교 재가설 사업 왕궁천 하천환경 정비사업 동면천 하천환경 정비사업 소하천 정비사업 만경강 문화관 조성사업 도로조명 조도개선

1		시･군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산, 용동, 망성, 용안, 금마, 왕궁, 삼기, 함라, 춘포, 낭산, 황등, 어양동, 부송동 일원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022

◦ 사업규모 : L= 26.66km, B= 6.5~24.0m

◦ 총사업비 : 31개사업 47,179백만원 (본예산 1,930)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 발주 4개소	: 2020. 1.

▸춘포 노적선 도로 확·포장공사 외 3개소

◦ 실시설계 추진 6개소	: 2020. 1. ~ 12.

▸왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업 외 1개소

◦ 행정절차 및 보상 10개소	: 2020. 1. ~ 12.

▸왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사 외 9개소

◦ 공사발주 2개소	: 2020. 6.

▸춘포 토다리~덕동간 도로 확·포장공사 외 1개소

◦ 공사완료 9개소	: 2020. 7.

▸망성 신성~관산간 도로 확·포장공사 외 8개소

□ 기 대 효 과

◦ 농어촌지역 주민의 교통 편익과 농수산물의 생산·유통을 향상시켜 농어촌지역의 생활환경 개선과 경제의 활성화에 기여

시 ㆍ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2020년 예산액	금후 투자
	31개사업	L=26.66km B=6.5-24m	47,179	16,005	1,930	29,244
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,248	1,198	50		공사중	망성 303 (신선선)
2	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	1,480	1,250	230		공사중	용안 203 (자석선)
3	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	825	825			공사중	함라 201 (진다선)
4	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,055	1,055			공사중	망성 102 (수용선)
5	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	800	580		220	공사중	금마 102 (누부선)
6	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	616		2,187	설계중	군도 21호
7	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,920	877		1,043	보상	춘포 103 (신화선)
8	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m	3,100	950	300	1,850	보상	시도 1268
9	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,500	600		900	설계중	금마 202 (서오선)
10	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,000	400		600	보상	황등 104 (황팔선)
11	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	948	700	170	78	공사중	오산 203 (신수선)
12	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m	1,221	700		521	공사중	왕궁 207 (양곡선)
13	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,400	600		800	설계중	삼기 203 (석라선)
14	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=24.0m	5,000	600	500	3,900	설계중	군도2호
15	오산역 –상아마을간 도로확포장공사	L=0.2km B=8.0m	200	200			설계중	오산 203 (신수선)
16	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	L=0.7km B=8.0m	1,500	100		1,400	신규	춘포 308 (창평선)
17	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	797		2,173	설계중	왕궁 210 (신기선)
18	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	779	200	1,850	설계중	금마 101 (서삼선)
19	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	회전교차로 1식	700	700			공사중	지방도706 용안201	특교 700
20	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	정비계획 1식	160	160			추진중

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2020년 예산액	금후 투자
21	왕궁 금오동~군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300		700	설계중	왕궁 102 (농장선)
22	춘포 오룡선 도로확.포장	L=0.5km B=8.0m	1,000	130		870	설계중	춘포 102 (오룡선)
23	황등 하동마을~ 동연지하차도간 도로솩포장사업	L=0.6km B=8.0m	1,250	650		600	설계중	농어촌 도로
24	왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업	L=0.5km B=8.0m	486	80		406	설계중	군도19호	국고
25	춘포 노적선 도로확포장	L=0.4km B=8.0m	700		100	600	신규	여산304 (금평선)
26	낭산-시영 선형개량사업	L=0.4km B=8.0m	1,000		100	900	신규	군도9호선	국고
27	신왕교차로 회전교차로설치	회전교차로 1식	280		280		신규	지방도723 시도68호	국고
28	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
29	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
30	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
31	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)

2		군도23호선 도로 확･포장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 1.

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=20.5m (2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 12,500백만원(공사비 9,000 보상비 3,100 기타 400)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기 투자액	2019년	2020년	2021년 이후	비고
시비	12,500	8,520	2,980	1,000	-

□ 추 진 계 획

◦ 1차분 공사 추진	: 2020.  1. ~ 2020.  3.

◦ 잔여토지 손실보상 및 수용재결	: 2020.  1. ~  5.

▸대상 - 38필지 9,373㎡

◦ 2차분 공사 추진	: 2020.  3. ~ 2021.  1.

◦ 공사 준공	: 2021.  1.

□ 기 대 효 과

◦ 삼기일반산업단지 조성에 따른 함열~산업단지간 교통증가에 대비하고, 원활한 교통망 구축으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 촉진

3		평화육교 재가설 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2021. 9.

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m(4차로 ⇒ 6차로)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 49,700백만원(국비 30,700 익산시 19,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기 투자액	2019년	2020년이후	비고
계	49,700	38,205	7,500	3,995
국 비	30,700	23,600	5,000	2,100
시 비	19,000	14,605	2,500	1,895

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

□ 추 진 계 획

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2019.  1. ~ 2021.  9.

▸농업용수로 이설, 접속램프 및 교량 재가설

◦ 평화육교 완전개통	: 2021.  9.

□ 기 대 효 과

◦ 안전등급 D등급인 평화육교의 고속철도 통과시 진동으로 인한 육교의 안정성 저하로 대형 사고위험이 상존하고 있어 재가설 추진으로 안전한 교통망 확보

4		왕궁천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리 ~ 춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2022.

◦ 사업규모 : L=9.25㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축(17.9㎞), 교량재가설(9개소) 등

◦ 총사업비 : 47,368백만원(국비 10,093, 도비 23,065, 시비 14,210)

▸2020년 예산 확보액 : 6,150백만원(도비 4,305, 시비 1,845)

□ 추 진 계 획

◦ 왕궁1지구 공사 추진

▸위  치 : 익산천 합류점 ~ 흥암교(4.62㎞)

▸기  간 : 2019. 3. ~ 2021. 3.

▸공정율 : 전체분 20%(2019. 12월말 기준)

▸내  용 : 축제 및 보축(8.7㎞), 교량 재설치(5개소) 등

◦ 왕궁2지구 공사 착수(발주 의뢰 : 2019. 11.)	: 2020. 2.

▸위  치 : 흥암교 ~ 보석박물관(4.63㎞)

▸기  간 : 2020. ~ 2022.

▸내  용 : 축제 및 보축(9.2㎞), 교량 재설치(4개소) 등

□ 기 대 효 과

◦ 통수 단면 부족 및 노후․미 개수된 하천제방․호안을 체계적으로

정비하여 주택 및 농경지 침수 등 하천 재해예방 도모

5		동면천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2023.

◦ 사업규모 : L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축(6.1㎞), 교량재가설(7개소) 등

◦ 총사업비 : 15,489백만원(국비 1,000, 도비 9,842, 시비 4,647)

▸2020년 예산 확보액 : 4,500백만원(도비 3,150, 시비 1,350)

□ 추 진 계 획

◦ 설계경제성 검토 회의	: 2020. 1.

▸동면천 하천기본계획 변경(2019. 8.)에 따른 실시설계 조정

◦ 실시설계 협의(2차, 익산지방국토청)	: 2020. 2.

▸공사구역 확정 후 편입토지 협의보상 병행

◦ 건설기술심의(전북도)	: 2020. 3.

◦ 총사업비 협의(익산지방국토청)	: 2020. 4.

◦ 인허가 및 공사 발주	: 2020. 6.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 개발과 연계한 하천환경개선 및 유역내 안전한 하천관리로 주민의 생명과 재산 보호

6		소하천정비사업

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
동산천 소하천정비공사	웅포면 맹산리 일원	2018 ~ 2020	2,700 (국비 1,350 시비 1,350) ▸2020년 : 905(시비)	소하천정비 L=1.018km
닭작골천 소하천정비공사	여산면 여산리 일원	2019 ~ 2022	3,902 (국비 1,951 시비 1,951) ▸2020년 : 372(시비)	소하천정비 L=1.4km

□ 추 진 계 획

◦ 동산천 소하천정비공사

▸동산천 소하천정비공사 추진	: 2020.  1.

- 시 공 사 : (유)도갑건설(대표 강지원)

- 공사기간 : 2019. 12. ~ 2021. 2.

- 공 사 비 : 2,526백만원(도급 1,565, 관급 961)

◦ 닭작골천 소하천정비공사

▸닭작골천 실시설계(안) 경관 심의	: 2020.  1.

▸닭작골천 사전설계 검토(전북도)	: 2020.  2.

▸닭작골천 실시설계(안) 계약심사	: 2020.  3.

▸닭작골천 소하천정비공사 시행공고 및 편입토지 보상	: 2020.  4.

▸닭작골천 소하천정비공사 발주	: 2020.  6.

□ 기 대 효 과

◦ 하천유역 정비로 농경지 침수 및 하천재해예방 등 안전한 하천관리

◦ 효율적인 하천이수․치수를 통한 공공복리 증진

7		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2020.

◦ 사업내용 : 13,814㎡[지하 1층, 지상2층/연면적 1,686㎡]

◦ 시설현황 : 다목적실, 로비, 사무실, 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강신탁지구 하천정비사업에 포함)

◦ 총사업비 : 11,350백만원(국비 10,000 시비 1,350 토지매입비)

□ 추 진 계 획

◦ 토지수용 재결에 따른 보상금 공탁 등(익산시)	: 2020. 2.

▸토지 2필지, 지장물 보상비 및 영업보상비

◦ 건축 및 토목 등 공사 추진(익산지방국토관리청)	: 2020. 2. ~ 12.

◦ 건축물 내 콘텐츠관련 발주(익산지방국토관리청)	: 2020. 4. ~

◦ 만경강문화관 관리·운영(익산시)	: 2021. 1. ~

□ 기 대 효 과

◦ 만경강에 문화관을 조성하여 만경강과 관련된 역사와 생활상을 전시·소개하고 이용객들에게 편의 제공 및 체험활동 참여확대 유도

8		도로조명 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 1,065백만원

◦ 사업내용 : 생활환경개선보안등 설치 외 12개사업

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		13개 사업	1,064,700
보 안 등 신규설치	생활환경개선보안등설치	보안등설치 201개소	216,000
	왕궁유적전시관 인근보안등설치	보안등설치 10개소	10,000
	밝은마을 만들기(가로등LED교체)사업	등기구교체 76개소	76,000	도보조
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비120개소	120,000
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 60개소	60,000
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	120,000
	동지역 보안등 보수	동지역 고장보안등 수리	78,200
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	42,000
	전기안전점검부적합보수단가	점검부적합보수 300개소	30,000
	도심지역노후가로등교체공사	노후가로등정비 1식	100,000
	노후가로등LED교체공사	LED등기구교체 1식	100,000
	산업단지조도개선공사	램프(안정기)교체 1식	90,000

□ 추 진 계 획

◦ 가로등․보안등 단가설계 및 계약의뢰	: 2020.  1.

◦ 가로등․보안등 단가착공 및 사업시행	: 2020.  1. ~ 12.

◦ 보안등 신규설치 현장조사 및 사업추진	: 2020.  2. ~  6.

◦ 가로등․보안등 단가 준공	: 2020. 12

□ 기 대 효 과

◦ 야간통행이 불편한 마을안길, 골목길 등에 조명시설개선 및 설치로 보행자의 야간보행권 확보 및 안전사고 예방