2020. 1.

제222회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 계획

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 주 요 성 과 및 반 성
□	2020 주요업무계획

비전 및 중점추진방향

	비 젼
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기       구

											상 수 도 과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	42	1	1	7	15	11	5	2
현 원	42	1	1	10	22	2	4	2
증 감				3	7	△9	△1

□ 사 무 분 장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 읍면배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수, 물이용부담금 부과징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 4, 여6

※ 근 거 : 수도법 제30조의제1항,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	287,771	285,929	99.4
도심권	227,746	227,427	99.9
읍면권	60,025	58,502	97.5

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	149,648
생 활 용 수	소 계	195,300	128,717	100%
	광 역	105,300	61,007	47%
	자 체	90,000	67,710	53%
공 업 용 수	자 체	35,000	20,931

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	63,445	3,287,586	100
가 정 용	48,375	1,628,927	49.5
일 반 용	14,260	593,552	18.1
대중탕용	40	20,163	0.6
산업용	673	369,571	11.2
전용공업용	97	675,373	20.6

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비 고
1,886.4	2.5	25.3	1,579.5	279.1

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥,금강,금마,팔봉(2),삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2019 주 요 성 과

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 대상 확정

‣ 노후상수도 정비사업(현대화사업)

- 총사업비 55,733백만원(국 27,866, 도 5,573, 시 22,294), 사업기간 2020~2024(5년)

‣ 스마트 지방상수도 지원사업

- 총사업비 5,201백만원(국 3,641, 시 1,560), 사업기간 2020~2021(2년)

‣ 노후상수관로 정밀조사 지원사업

- 총사업비 723백만원(국 506, 시 217), 사업기간 2020. 1. ~ 12.(1년)

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

‣ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 23개소 7.3km/700개소

‣ 관내 변류정비 및 교체 285개소

◦ 상수도 요금 부과징수로 경영 효율화 제고

‣ 상수도 요금 부과/징수 : 267억원/263억원(징수율 98.4%)

‣ 정확한 사용량 조사로 투명한 부과체계 확립

- 수도계량기 조사원 교육                               : 12회

- 정확한 검침을 위한 노후‧고장 수도계량기 교체         : 11,383전

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수구역 확장공사 추진 : 3개소 1.0km

‣ 급․배수관 개선공사 추진 : 355개소 8.0km

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 급수장치 수선 공사 : 1,981건

‣ 수용가 옥내누수 탐사 : 1,292건

‣ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 53개소 12.3km

□ 반      성

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

‣ 시민부담을 고려하여 점진적 수도요금 인상으로 현실화 추진

‣ 연도별 현실화율 현황(2016년 80.93%, 2017년 76.29%, 2018년 75.05%)

2020 주요업무계획

		노후상수도 정비사업 <지방상수도 현대화사업>
		스마트 지방상수도 지원사업 <지방상수도 현대화사업>
		노후상수관로 정밀조사 지원사업 <지방상수도 현대화사업>
		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역
		급수구역확장 및 급□배수관 민원공사
	□	안전하고 깨끗한 수돗물 관리
	□	상수도 요금 부과․징수

1		노후상수도 정비사업 <지방상수도 현대화사업>

□ 필  요  성

◦ 노후 상수도 정비사업으로 시민의 먹는 물 안전 확보

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1.  ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 대상분야 : 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

◦ 목    표 : 유수율 85%(현재 71.4%)

◦ 사업내용 : 노후관교체(L=148km) 및 블록시스템구축(31개소)

◦ 총사업비 : 55,733백만원(국비 50%, 도비 10%, 시비40%)

▸ 2020년 사업비 : 8,360백만원

□ 추 진 실 적

◦ 노후상수도 정비사업 국비확보 추진                : 2016.  3. ~ 9.

▸ 국비지원 환경부 회의 참석                     : 2019.  8.  1.

▸ 사업 추진계획 및 경영개선평가 자료 제출       : 2019.  8.  5.

▸ 국비지원 가내시                               : 2019.  9. 20.

◦ 노후상수도 정비사업 위탁협약서 작성              : 2019. 11.~ 12.

▸ 위탁협약서 작성완료(익산시+한국수자원공사)

□ 추 진 계 획

◦ 위탁협약 체결(익산시+한국수자원공사)        : 2020. 1월중

◦ 실시설계용역 및 환경부 협의․승인           : 2020. 1. ~ 2021. 12.

◦ 공사 착공 및 추진                           : 2022. 1. ~ 2024. 12.

2		스마트 지방상수도 지원사업 <지방상수도 현대화사업>

□ 필  요  성

◦ 수돗물 공급과정중 감시체계를 구축 사전 사고발생 방지

◦ 사고발생시 신속 대응이 가능한 시스템 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.(2년간)

◦ 대상분야 : 수돗물 공급 감시시스템 및 대응시스템 구축

◦ 목    표 : 유수율 85%(현재 71.4%)

◦ 사업내용 : 정밀여과장치, 자동수질 측정장치, 유량수압 감시시스템 등

◦ 총사업비 : 5,201백만원(국비 70%, 시비 30%)

▸ 2020년 사업비 : 5,201백만원

□ 추 진 실 적

◦ 스마트 지방상수도 지원사업 수요조사 제출         : 2019.  7.

◦ 국비지원 가내시(3,641백만원)                      : 2019.  9. 17.

◦ 스마트 지방상수도 지원사업 위탁협약서 작성       : 2019. 11.~ 12.

▸ 위탁협약서 작성완료(익산시+한국수자원공사)

□ 추 진 계 획

◦ 위탁협약 체결(익산시+한국수자원공사)        : 2020. 1월중

◦ 실시설계용역 및 환경부 협의․승인           : 2020. 1. ~ 7.

◦ 사업착수 및 추진                            : 2020. 8. ~ 2021. 12.

3		노후상수관로 정밀조사 지원사업 <지방상수도 현대화사업>

□ 필  요  성

◦ 노후 상수관로에 대한 실태조사를 통해 관망현황 및 문제점 분석

◦ 정밀하고 실체적인 상수관망도 구축으로 수돗물 공급 최적화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.(1년)

◦ 대상분야 : 상수관로 정밀조사로 문제점 및 개선방안 도출

◦ 목    표 : 유수율 85%(현재 71.4%)

◦ 사업내용 : 노후상수관로 정밀조사(L=433㎞)

◦ 사 업 비 : 723백만원(국비 70%, 시비 30%)

□ 추 진 실 적

◦ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 수요조사 제출     : 2019.  8. 22.

◦ 국비지원 가내시(506백만원)                        : 2019.  9. 17.

◦ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 위탁협약서 작성   : 2019. 11.~ 12.

▸ 위탁협약서 작성완료(익산시+한국수자원공사)

□ 추 진 계 획

◦ 위탁협약 체결(익산시+한국수자원공사)             : 2020. 1월중

◦ 실시설계용역 및 환경부 협의․승인                : 2020. 1. ~ 7.

◦ 사업착수 및 추진                                : 2020. 8. ~ 12.

4		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역

□ 필  요  성

◦ 대간선수로(28km) 생활하수 등 오염원 증가에 따른 대책

◦ 취 □ 정수시설 및 상수관망 노후화에 따른 시설개선 방안

◦ 안정적인 수돗물 공급을 위한 광역상수도 급수구역 검토 등

□ 사 업 개 요

◦ 용 역 명 : 익산시수도정비기본계획(변경)수립용역

◦ 용역내용 : 용역 1식

◦ 용역기간 : 2019. 3. 5. ~ 2020. 9. 24.

◦ 용 역 비 : 449백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 착수              : 2019. 3. 5.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 시민공청회 개최   : 2019. 6. 26.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 기초조사          : 2019. 7. ~ 8.

◦ 기본사항의 결정, 시설확충계획 및 관련기관협의    : 2019. 10.

◦ 환경부 초안보고서 승인 협의                     : 2019. 10. ~ 12.

□ 추 진 계 획

◦ 환경부 본안보고서 작성 및 검토	: 2020. 1. ~ 4.

◦ 환경부 본안보고서 승인 협의	: 2020. 4. ~ 5.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 환경부 승인 완료	: 2020. 9.

5		급수구역확장 및 급·배수관 민원공사

□ 필  요  성

◦ 수압이 낮은 지역에 급 □ 배수관 확장으로 수돗물 공급 최적화

◦ 상수도부설 노후도로에 대한 아스콘덧씌우기 공사로 시민불편 해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

◦ 사업내용                                             (단위 : 백만원)

구 분	위 치	사 업 량	사업비	비고
계			1,579
급수구역 확장공사	신천마을 ~ 유천제방간	배수관부설 L=300m	60
	동부시장오거리 ~ 신협간	배수관부설 L=152m	30
	반석교회사거리 ~ 신협간	배수관부설 L=273m	55
	남중학교 ~ 헤어미용실간	배수관부설 L=170m	34
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	12km	600
급·배수관 민원공사	익산시 일원	8km	800

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장 및 상수도부설도로 노면정비공사

▸ 현지조사 및 설계	: 2020. 1. ~  3.

▸ 공 사 기 간	: 2020. 4. ~ 12.

◦ 급 □ 배수관 민원공사

▸ 수압저조로 인한 급수불출 민원발생시	: 연중시행

6		안전하고 깨끗한 수돗물 관리

□ 필  요  성

◦ 원수 및 정수에 대한 목표 수질관리 운영으로 시민에게 맑은 물 공급

◦ 수질검사 강화로 안전하고 깨끗한 수돗물의 생산·공급

□ 사 업 개 요

◦ 원ㆍ정수 수질검사 강화

구 분	법정검사 기준	수질검사 강화
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 25개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 25개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 정수약품 투입 모니터링을 통한 적정량 투입으로 효율적 운영 관리

◦ 상수원보호구역 및 상수원 수로 순찰 등으로 원수 수질관리 철저

◦ 수돗물품질보고서 제작 배부 및 수질검사 결과 홈페이지 등에 매월 공개

◦ 사업내용

▸ 수돗물 품질보고서 및 홍보물 제작           : 2건 / 20백만원

▸ 노후 수질자동측정기 교체                   : 1건 / 20백만원

▸ 염소용기 검사 및 수선                      : 1건 /  7백만원

□ 추 진 계 획

◦ 상수원 수로 순찰 등 원수 수질관리 강화로 깨끗한 원수 확보

◦ 시민이 안심하고 먹을 수 있는 원‧정수 관리시스템 지속 운영

7		상수도 요금 부과·징수

□ 필  요  성

◦ 정확한 검침 및 요금 부과로 신뢰받는 상수행정 구현

◦ 강력한 징수활동을 통한 체납액 징수율 향상으로 재정건전성 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 기 간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 2020년도 요금 부과 징수 목표액        (단위 : 백만원, %,  ’20. 1. 2. 현재)

구 분	부 과 목 표				체 납 액			비고
	’20년 목표액(A)	’19년 부과액(B)	증감액 (C=A-B)	증감율 (C/B)	계	’19년도	’18년도 이전
금 액	27,953	26,742	1,211	4.5	834	428	406

※ 급수전수 : 63,445전(가정용 48,375전, 일반용 14,260전, 대중탕용 40전, 산업용 673전, 전용공업용 97전)

□ 추 진 계 획

◦ 정확한 검침을 위한 수도 계량기 조사원 교육

▸ 계량기 조사원 현황 : 48명(통․리장 16명, 일반 32명)

▸ 친절․직무교육 및 워크숍 실시 : 교육(월1회)/워크숍(년1회)

▸ 계량기 조사원 담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

◦ 수도요금 고지 관리

▸ 요금고지 : 월 59,488건 정도 (우편발송 2,062건/ 조사원 전달 57,426건), 자동납부 26,780건

▸ 2회 이상 체납 시 고지서에 단수예고 안내 고지

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수반 편성․운영 : 2개반

▸ 상습체납자 집중징수기간 운영  : 연 2회

▸ 30만원 이상, 3회이상 체납자에 대한 강력한 체납징수 : 수시

- 전화․방문 납부독려 및 단수, 토지 및 건물 등에 대한 재산 압류 조치

※ 기초생활수급자 등 사회적 약자에 대한 단수유예 및 혹한기 단수유예로 시민불편 최소화