2020. 1.

제222회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 계획

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 주요성과 및 반성
□	2020 주요업무계획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전 정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지 조성

일   반   현   황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	6	6	7	5
현 원	25	1	8	7	4	5
증 감	-		2	1	▵3	-

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수, 유천 생태습지 유지관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2019. 12.	비 고
시설	총인구	천명	294
	하수인구	천명	269
	보급률	%	91.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	118,531
	1일평균하수처리량	톤	116,184
	하수처리율	%	98.0
하수도 사용	개소수	전	39,783
	톤당 평균요금	원	695.8

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	29	150,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	관리대행 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	〃
제3일반산업단지 공동 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	〃

2019 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 2020년 하수관로 정비사업 국고보조 신규 사업 확정

‣ 북부1처리분구 하수관로 정비사업 국비 29,125백만원 확보

‣ 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 국비 5,000백만원 확보

‣ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 국비 397백만원 확보

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

‣ 춘포 쌍정·반도·궁월지구 하수관로 정비공사 완료

- 관로정비 3.1km, 배수설비 109가구

‣ 남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비공사 추진

- 관로정비 30.5km, 배수설비 2,616가구 (공정율 12%)

‣ 시내일원 분류식관로 배수설비 설치공사

- 함열서부3처리분구 외 8건 배수설비 119가구 설치완료

◦ 공공하수처리장 기능보강 등 효율적 관리를 통한 수질환경개선

‣ 여산처리장 외 9개소 기능보강공사 및 삼기대재 1개소 기술진단 실시

◦ 하수찌꺼기 감량화 사업 추진을 위한 재원협의 완료 및 시설공사 착공

‣ 사업비(58.24억원) 추가확보 및 소화가스설비 우선시공으로 악취방지

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 소규모 공사 48건 완료 및 생활민원처리 158건 완료

‣ 시내일원 침수우려지역 12개소 등 하수도(L=25km) 기계준설 완료

‣ 생활민원 처리를 위한 비상근무조 운영 : 1,950건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 전북지방환경청 점검 시 소규모 하수처리장 방류수 수질기준 초과

‣ 삼기대제(총질소 등), 웅포강변(BOD 등) 과태료 320만원 납부

2020 주요업무계획

	□	남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 익산시 하수도정비 기본계획 수립용역 하수찌꺼기 감량화 사업 공공하수처리시설 운영관리 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 소규모 하수도관련 주민숙원사업

1		남부2⦁3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업

□ 필  요  성

◦ 시내일원 오·우수 분류식 하수관로 정비를 통한 생활환경개선 및 만경강        수계 수질개선과 공공하수처리시설의 운영효율 제고

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2022. 5.(3년)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=30.5km, 배수설비 2,616가구

◦ 총사업비 : 36,490백만원(국비 25,543 도비 1,094 시비 9,853)

▸ 2020년 사업비 – 1,447백만원(국비 1,013 도비 43 시비 391)

□ 추 진 실 적

◦ 시설공사 1차분 착공	: 2019. 5. 29.

※ 공정율 : 40% (관로 4.8km, 배수설비 92가구)

◦ 건설사업관리용역 착수	: 2019. 5. 31.

□ 추 진 계 획

◦ 1차분 공사 추진	: 2019. 5. ~ 2020.  5.

◦ 2차분 공사 추진	: 2020. 1. ~ 2020. 12.

※ 장기 계속사업으로 2022. 5월 준공 예정

2		익산시 하수도정비 기본계획 수립용역

□ 필  요  성

◦ 개발여건 변화에 부응하는 체계적이고 합리적인 하수도 사업 추진을

위한 하수도정비 기본계획 수립으로 효율적인 하수행정의 기반 구축

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 12.(2년)

◦ 사업내용 : 개발여건 변화에 따른 하수처리구역 확대검토, 금마하수처리장                    증설검토, 소규모 공공하수처리장 신·증설 계획 검토 등

◦ 총사업비 : 1,700백만원 (시비)

▸ 2020년 사업비 – 900백만원

□ 추 진 실 적

◦ 기본계획수립용역 익산시 계약심사	: 2019. 2.

◦ 기본계획수립용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 5.

◦ 기본계획수립용역 착수(공정율 : 20%)	: 2019. 7.

□ 추 진 계 획

◦ 하수도정비기본계획(안) 작성 및 검토 협의        : 2020. 상반기 중

※ 전라북도 새만금수질개선과, 전북지방환경청 환경관리과

◦ 하수도정비기본계획(안) 승인 [환경부]	: 2020. 하반기 중

3		하수찌꺼기 감량화 사업

□ 필  요  성

◦ ‘95년 준공되어 운영중인 익산공공하수처리장 슬러지처리공정의 노후시설        개선, 악취방지시설 등을 설치하여 하수찌꺼기 감량화 및 악취저감

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

◦ 사업내용

▸ 스팀방식 변경, 드럼스크린 교체, 탈취커버, 가스저장탱크 교체 등

▸ 소화조(6,692㎥/일), 탈취시설, 기계식 농축시설, 가스 정제설비 등 신설

◦ 총사업비 : 26,844백만원(국비 18,791 도비 4,027 시비 3,006 기금 1,020)

▸ 2020년 사업비 – 8,579백만원(국비 6,005 도비 1,287 시비 1,277 기금 10)

□ 추 진 실 적

◦ 환경부 재원협의 및 총사업비 변경 완료       : 2018. 12. ~ 2019. 5.

◦ 설치(변경)인가, 경관심의, 설계의 안전성검토 등   : 2019.  5. ~ 8.

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 착공(공정율 : 10%) : 2019.  8.

□ 추 진 계 획

◦ 1차분 준공	: 2020.  5.

◦ 전체 준공	: 2021. 12.

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 필  요  성

◦ 하수처리시설의 위탁운영을 통해 적정 수질관리를 준수하고 전문운영관리        및 시설 개·보수를 통한 악취 및 수질환경 개선

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소

하수처리시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	13개소
운영방식	위탁운영[(주)전북엔비텍BTO, 2008.~2028.]

※ 2020년 BTO위탁운영비 예산 : 124억원(도비 5.9억원 시비 118억원)

□ 추 진 계 획

◦ 익산 외 4개소 공공하수처리시설 수질관리(6개항목, 일1회)	: 연중

◦ 익산 외 4개소 분기별 복합악취농도 검사	: 분기별

◦ 익산공공하수처리장 차집관로 보수공사	: 연중

◦ 3중계펌프장 조목스크린 개선공사	: 2020.  3.

◦ 익산하수 및 금강분뇨 악취기술진단	: 2020.  3.

5		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 필  요  성

◦ 소규모 공공하수처리시설과 제3‧국가식품 산업단지의 공공폐수처리시설        등에 대하여 전문적인 운영관리 기술을 가진 관리대행업체에 위탁운영        하여 시설의 효율적 운영과 방류수질 기준 확보

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 24개소

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	77개소	5,500	5,000	2개소
운영방식	위탁운영[환경시설관리(주), 2020.~2022.]

※ 2020년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비 예산 : 27.8억원

□ 추 진 실 적

◦ 익산시의회 동의안 심의	: 2019.  6.

◦ 관리대행 기술제안서 제출(입찰) 공고	: 2019. 11.

◦ 기술제안서 평가 및 업체 선정	: 2019. 12.

◦ 시설물 인계‧인수	: 2019. 12.

◦ 관리대행 개시	: 2020.  1.

□ 추 진 계 획

◦ 공공하·폐수처리시설 시설 개·보수	: 연중

◦ 공공하·폐수처리시설 원격감시제어 시스템 구축	: 2020.  3.

◦ 여산 하수처리시설 기술진단	: 2020.  3.

◦ 소규모(삼기간촌 외 3개소) 기술진단에 대한 개선공사     : 2020.  5.

6		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 필  요  성

◦ 오수배제 불량, 악취발생 및 하수관로 매설구간 침하 등의 안전사고        발생이 우려되는 노후하수관로의 정비를 통해 시민 보건위생 향상 및        생활환경 개선, 지하수 오염 예방 및 하수배제 효율성 확보

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 사업기간 : 2020. 2. ~ 2021. 12.

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=13.4km

◦ 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000 도비 500 시비 4500)

▸ 2020년 사업비 – 3,016백만원(국비 1,508 도비 150.8 시비 1,357.2)

□ 추 진 실 적

◦ 2020년 신규 국가보조사업 신청	: 2019.  2.

◦ 국가산업단지 하수관로 기술진단 실시	: 2019.  4.

◦ 실시설계용역 착수(공정율 : 20%)	: 2019. 10.

◦ 2020년 신규 사업 예산 반영(국회)	: 2019. 12.

□ 추 진 계 획

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2020.  4. ~ 6.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2020.  7. ~ 2021. 12.

7		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 필  요  성

◦ 주민불편 소규모 하수도 관련 시설물 개선공사로 주민불편 해소

◦ 하수관 내 퇴적토, 슬러지 준설, 맨홀뚜껑 교체 및 하수관로 연결 등

주민숙원사업 추진

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 1,846백만원(시비)

◦ 사업내용

▸ 주민불편 하수도 시설물 개선 등 소규모 숙원사업 추진

▸ 하수관 내 퇴적토, 슬러지 준설, 맨홀뚜껑 교체 및 하수관로 연결 등          생활환경개선사업 추진

◦ 사업개요	: 59건 / 1,846백만원

▸ 소규모 주민숙원사업	: 32건 / 1,594백만원

▸ 생활환경개선사업	: 27건 / 252백만원

□ 추 진 계 획

◦ 사업대상지 현장조사 및 실시설계	: 2020. 1. ~ 3.

◦ 공사 착공 및 준공	: 2020. 4. ~ 12.