2020. 5.

제226회 익산시의회(1차 정례회)

2020 행정사무감사

	경제관광국

역사문화재과

	□		감사자료 과 공통사항
		1.			2019년 업무성과 및 반성	………	249
		2.			2019년 예산집행 및 추진사항	………	252
		3.			2019년 행정사무감사 지적사항 조치결과	………	255
		4.			2019년 상급기관 감사 지적사항 및 조치결과	………	257
		5.			시정질문 조치 결과	………	257
		6.			주요사업 조서(3천만원 이상)	………	258
		7.			2019 각종 민원(진정·건의·청원 등) 접수 처리내역	………	263
		8.			기금 운용 관련사항	………	263
		9.			위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	………	264
		10.			용역사업 관련	………	267
		11.			인․허가 민원처리 관련사항	………	268
		12.			각종공사 설계 변경 상황	………	269
		13.			건설공사 집행 현황(3천만원이상)	………	272
		14.			민간에 대한 보조금 집행 내역	………	275
		15.			국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)	………	277
		16.			2019년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역	………	280
		17.			2020년도 명시이월 내역	………	282
		18.			예산전용 사항 및 예비비 집행 현황	………	283
		19.			공사 준공기한 연장 내역	………	284
		20.			국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	………	284
		21.			국․도비 반납현황 및 사유(2019년도 반납건)	………	285
		22.			2019년도 계획사업 중 미착공사업 현황	………	286
		23.			2019년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황	………	287
		24.			2019년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황	………	287
		25.			2019년도 예산편성 후 전액 미집행 내역	………	288
		26.			소송사건 현황	………	288
		27.			시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	………	289

	□		감사자료 과 요구사항
			1.	익산 역사문화도시 조성 추진실적 …………………	293
			2.	세계유산 보존 관리 추진실적 ……………………	294
			3.	세계유산 활용 홍보 추진실적 ……………………	295
			4.	백제세계유산센터 연계사업 추진실적 ……………	296
			5.	익산 고도보존육성사업 추진실적 ………………	297
			6.	문화유산 보존관리(정비) 추진실적 ………………	298
			7.	백제왕궁(왕궁리유적) 보수정비 추진실적………	300
			8.	미륵사지 보수정비 추진실적………………………	301
			9.	문화재 활용사업 추진실적 …………………………	302
			10.	국립익산박물관 건립현황……………………………	303
			11.	백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성사업 추진실적…	304
			12.	국가무형문화재통합전수교육관 운영 및 관리 현황 …	305

감사자료 과 공통사항

1. 2019년 업무성과 및 반성

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강 숙 자	□
		문화재시설계장		박성일	□

□ 성      과

◦ 문화재 보존정비 추진

▸익산 솜리 근대역사문화공간 재생 활성화 사업 선정

▸백제왕궁 정원·후원 정비공사 완료

▸미륵사지 강당지 및 승방지 기단부 정비공사 완료

▸미륵사지 석탑 보수 정비 완료 및 준공행사 개최

▸국립익산박물관 준공, 미륵사지 전면부 광장 정비 완료

▸익산쌍릉(무왕릉) 발굴조사로 백제왕도 정체성 확보

▸익산쌍릉 정비 등 문화재 보존정비 20건(완료 13건 / 시행중 7건)

◦ 국가지정문화재 승격(1건), 신규지정 및 등록(국가등록 11건, 도지정 2건, 향토유적 3건)

▸익산 김병순 고택(국가민속문화재 제297호)

▸익산 구 이리농림 고등학교 본관(등록문화재 제758호)

▸익산 솜리 근대역사문화공간(등록문화재 제763-1~10호)

▸익산 관음사 묘법연화경(전라북도 유형문화재 제260호)

▸익산 성당포구농악(전라북도 무형문화재 제7-7호)

▸숭림사 우화루, 광교중창비, 은천사 및 이보정려각(익산시 향토유적 제19~21호)

◦ 고도보존육성사업 추진

▸ 고도이미지찾기사업 : 한옥지원사업 94건(한옥 52건 / 담장 및 대문 42건)

▸ 이주단지 고도이미지찾기사업 : 한옥지원사업 13건(한옥 8건 / 담장및대문 5건)

▸ 금마 간판정비(금마길, 고도길, 미륵사지로, 금마터미널일원 )사업 완료(149개소)

▸ 왕궁 탑리마을 가로경관사업 완료(담장정비 L=226m 및 안길포장 41.1a)

▸ 금마 옥룡천 인도교 설치 완료(L=23m B=2.5m)

▸ 금마 전선지중화 준공정산 추진(8개중 7개 정산완료)

◦ 역사문화도시 조성 추진

▸익산 근대역사관 개관(등록문화재 제180호 익산 중앙동 구 삼산의원)

▸이리-익산 근현대사 자료 수집 및 자료집 제작

▸고도 익산의 정체성 확립을 위한 학술회의 개최

◦ 2020년 문화재청 공모사업 선정(7건 / 1,475백만원)

▸지역문화재 활용 사업(문화재 야행사업, 생생문화재 활용사업, 향교․서원 활용사업)

▸국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업

▸세계유산 홍보 지원사업(백제역사유적지구)

▸세계유산 활용 프로그램 사업(백제역사유적지구)

▸지역문화유산 교육사업

◦ 문화재활용 콘텐츠 개발 및 프로그램 운영

▸익산 문화재야행(2회 / 37,000여명)

▸생생 문화재 사업(8회 / 291명), 향교․서원 문화재 활용사업(22회/710명)

▸세계유산 백제왕궁 천년별밤캠프(6회/216명)

▸백제왕궁 토요 야간상설공연(12회/1,010여명)

▸백제왕궁 한가위 소원등 날리기(3,000여명)

◦ 무형문화재 향유프로그램 지속 및 활성화

▸무형문화재 상설공연 및 공개행사 추진(단체 5 / 개인 3)

▸무형문화재 전수교육 육성 (4개단체/18개 종목/280명)

□ 반      성

◦ 문화재 보수정비 문화재청 승인 기간 과다소요로 인한 예산 집행률 저조

‣문화재청 제도개선 건의 및 기성금 등 적극 지급으로 예산 집행 최대한 노력

2. 2019년 예산집행 및 추진사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 액					집행액	잔 액	비율	비고
				계	2019 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액	계속비 이월액
역사문화재과				34,957,685	21,436,079	2,854,472	1,245,570	9,421,564	34,730,897	226,788	99.4	이월액 10,450,659 -명 시 1,970,870 -사 고 752,530 -계속비 7,727,259
	문화재			34,957,685	21,436,079	2,854,472	1,245,570	9,421,564	34,730,897	226,788	99.4
	전통문화보존 및전승			33,538,626	20,017,020	2,854,472	1,245,570	9,421,564	33,314,240	224,386	99.3
		문화재보존 및전승		23,570,702	15,918,520	1,732,502	1,070,570	4,849,110	23,374,654	196,048	99.2
			문화재 보수 정비	160,968	160,968				160,382	586	99.6
			문화유적지 정비	2,133,208	1,786,280	346,928			2,059,217	73,991	96.5	명시 230,000 사고 192,530
			문화재 운영	45,020	45,020				43,954	1,066	97.6
			세계유산 보존관리 사업 (왕궁리유적)	6,612,748	3,871,428			2,741,320	6,612,748	0	100.0	계속비 2,332,429
			세계유산 보존관리 사업 (미륵사지)	6,050,649	4,441,429			1,609,220	6,050,649	0	100.0	계속비 3,035,366
			국가지정 및 등록문화재 보수정비 (제석사지)	498,570				498,570	498,570	0	100.0	계속비 454,050
			국가지정 및 등록문화재 보수정비	5,443,168	3,331,000	1,141,598	970,570		5,377,244	65,924	98.8	명 시 1,030,876
			문화재 긴급 보수사업	170,000	170,000				170,000	0	100.0	명 시 88,585
			도지정 문화재 보수정비	1,060,410	835,000	225,410			1,038,637	21,773	97.9
			문화재 재난방지시설 구축	418,566	400,000	18,566			396,060	22,506	94.6
			문화재 방재 시설 유지 관리 지원	21,500	21,500				20,860	640	97.0
			문화재 방재IOT시스템	300,000	300,000				300,000	0	100.0	명 시 300,000
			목조문화재 U-안전관리시스템 유지관리	4,293	4,293				3,939	354	91.8
			문화재 안전경비원 배치 및 활용	89,500	89,500				88,509	991	98.9
			전통사찰 보수 정비	100,000			100,000		100,000	0	100.0
			전통사찰 방재시스템 유지관리	17,136	17,136				17,043	93	99.5
			국가무형문화재 통합전수교육관 운영	82,670	82,670				80,823	1,847	97.8
			전수교육관 활성화 지원	31,690	31,690				31,690	0	100.0
			무형문화재 전수활동비	108,800	108,800				106,580	2,220	98.0
			농악 전승학교 지원	12,000	12,000				11,640	360	97.0
			기예능 보유자 전수지원	134,906	134,906				134,906	0	100.0
			무형문화재 전수시설 개선 지원사업	12,000	12,000				12,000	0	100.0	명 시 12,000
			문화재안내판 정비	32,900	32,900				29,203	3,697	88.8
			향교시설 개선지원사업	30,000	30,000				30,000	0	100.0	명 시 30,000
		역사문화 도시 조성		3,060,535	2,643,565	321,970	95,000	0	3,052,263	8,272	99.7
			세계유산 보존 관리 사업	108,558	108,558				108,526	32	100.0	명 시 15,000
			세계유산 보존관리 사업(백제역사유적지구)	476,970	200,000	276,970			474,356	2,614	99.5
			세계유산 활용 및 홍보 사업	265,980	265,980				265,946	34	100.0
			세계유산 활용 및 홍보 사업(백제역사유적지구)	430,000	430,000				430,000	0	100.0
			백제세계유산 센터 운영	266,700	266,700				266,700	0	100.0
			백제왕궁 편의 시설 운영	11,327	11,327				11,135	192	98.3
			역사도시 조성	242,000	102,000	45,000	95,000		236,600	5,400	97.8
			문화특화지역 조성 사업(보조)	815,000	815,000				815,000	0	100.0
			문화재 야행사업	354,000	354,000				354,000	0	100.0
			향교서원 활용사업	60,000	60,000				60,000	0	100.0
			생생문화재 활용사업	30,000	30,000				30,000	0	100.0
		고도보존 육성		6,907,389	1,454,935	800,000	80,000	4,572,454	6,887,323	20,066	99.7
			고도보존 정비	37,000	37,000				37,000	0	100.0
			익산고도 육성사업	522,307	522,307				522,018	289	99.9	명 시 264,408
			익산고도육성 사업(보조)	100,000	100,000				100,000	0	100.0
			고도지구 주거환경 및 가로경관 개선 지원	919,199	39,199	800,000	80,000		919,199	0	100.0	사 고 560,000
			고도지구 주거환경 및 가로경관 개선 지원(보조)	3,412,151	756,429			2,655,722	3,392,374	19,777	99.4	계속비 587,520
			서동생가터 정비	1,916,732				1,916,732	1,916,732	0	100.0	계속비 1,317,894
	재무활동			1,387,673	1,387,673				1,385,462	2,211	99.8
		보전지출		1,387,673	1,387,673				1,385,462	2,211	99.8
			보전지출	1,387,673	1,387,673				1,385,462	2,211	99.8
	행정운영경비			31,386	31,386				31,195	191	99.4
		기본경비		31,386	31,386				31,195	191	99.4
			기본경비	31,386	31,386				31,195	191	99.4

3. 2019년 행정사무감사 지적사항 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과-	비고
1	•명시이월과 관련하여 ▸예산편성단계에서부터 꼼꼼히 살피고 당해연도에 집행가능한 예산은 최대한 집행하여 이월을 최소화할 수 있도록 하기 바람.	▸사업계획을 면밀히 수립하여 당해연도에 완료가 가능한 사업은 이월이 되지 않도록 하여 이월 사업을 최소화 할 수 있도록 노력하겠음. (명시이월액 감소 883,603천원)
2	•용역사업과 관련하여 ▸전체 용역사업 중에 30% 정도가 수의계약이고 특정업체 편중되는 경향이 있음. 투명한 계약으로 제대로된 결과를 도출시키고 예산절약을 위해 수의계약을 최소화할 수 있도록 노력하기 바람	▸용역사업 중 추가 발굴 조사 등은 수의계약이 가능하며 추후 필수 불가결한 사업을 제외하고는 공개입찰에 의해 업체를 선정하도록 하겠음.
3	•함벽정 관리 미흡 ▸함벽정은 전라북도 유형문화재로 목조문화재인데 화재 방재시설이 없고, 화장실 및 안내판 보수가 제대로 되어 있지 않아 이에 대한 개선이 필요함.	▸화장실은 수시로 점검 및 수리를 하고 있으나 무인으로 운영되어 파손되는 경우가 많음 ▸ 2020년도에 도지정문화재 보수정비사업으로 화장실 리모델링 및 방재시설 구축사업을 신청하여 추진하도록 하겠음. (2020년 예산반영 85,000천원)
4	•향토유적심의위원회 구성과 관련하여 ▸위원회 구성시 우리지역을 잘 알고 있는 익산 출신으로 구성하기 바람.	▸향후 위원회 구성시 반영토록 하겠음. (시기 미도래)
5	•전통사찰 방재시스템 구축과 관련하여 ▸재난방지사업의 하나로 볼 수 있고 이는 국가에서 실시하고 관리하는 것이 효율적이라고 판단되며, 민간에 보조금을 줄게 아니라 직접 사업으로 추진하는 것을 검토하기 바람.	▸전통사찰 방재시스템 구축사업은 문체부에서 전국에 있는 전통사찰을 대상으로 실시하는 사업으로 문체부에 관련 내용에 대해 건의 하여 개선될 수 있도록 노력하겠음. (문체부 미반영)

4. 2019상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		세계유산계장		강 숙 자	□

구 분	사 업 명	처분요구내용	조치결과	비고
2019년 보조금 집행실태 특정감사	2017년 세계유산연계 도보탐방 프로그램	보조금 전용카드 미사용	보조금 전용카드 사용 안내
2019년 보조금 집행실태 특정감사	2017년 무형 문화재 공개행사	무형문화재 공개행사 정산 부적정	유사사례 재발되지 않도록 보조금 관련 법규 숙지 및 업무 수행안내

5. 시정질문 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□

해  당  없  음

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	64개 사업	36,088,807	25,068,936	11,019,961
익산 근대문화유산 실측조사 및 DB구축	익산 근대문화유산 실측조사 및 DB구축	192,530	0	192,530	용역추진중 (2018.12~2020.4)	사고 이월 (완료)
덕기동 유적 발굴조사	발굴조사	146,928	119,290	27,638	완료
용안동헌 주변정비	용안동헌 전면부 정비	200,000	193,023	6,977	완료
마한 실체 규명을 위한 시발굴조사	무형리 고분 시･발굴조사	230,000	17,756	212,244	발굴조사중 (2020.3~2020.7)	명시 이월
익산 나바위성당 역사관 정비	역사관 정비	180,000	177,659	2,341	완료
2017년 왕궁리 유적 정비	발굴지 정비	4,487,143	4,487,143	0	완료
2018년 왕궁리 유적 정비	발굴지 정비	3,514,300	3,163,323	350,977	완료	계속비 이월
2019년 왕궁리 유적정비	발굴지 정비	3,071,428	1,499,497	1,571,931	정비추진중 (2019.12~2020.11)	계속비 이월
백제역사유적지구 문화재안내판 교체	안내판 정비	100,000	89,078	10,922	완료	계속비 이월
왕궁리유적 전시관 보수	전시관 보수 설계	700,000	301,401	398,599	용역추진중 (2019.6~2020.4)	계속비 이월
2018년 미륵사지정비	기단부 정비	3,180,000	2,727,347	452,653	완료	계속비 이월
2019년 미륵사지정비	기단부 정비	4,371,429	1,793,933	2,577,496	정비추진중 (2019.9~2020.9)	계속비 이월
미륵사지 당간 지주 보존처리	보존처리	70,000	64,782	5,218	완료
중앙동 구 삼산 의원 이전복원	이전·복원	970,570	961,382	9,188	완료
2018년 제석사지 정비	건물지 정비	498,570	44,520	454,050	정비추진중 (2019.9~2020.5)	계속비 이월
익산 주현동 구 일본인농장사무실 보수정비	지붕 및 외벽보수	185,328	143,713	41,615	완료
익산 구 춘포역사 정비	보존활용계획 수립 및 보수정비	90,600	80,159	10,441	완료
2018년 익산 나바위성당 정비	사무실･사제관 권역 정비	413,238	354,656	58,672	완료
익산토성 발굴조사	발굴조사 및 발굴지 정비	179,831	0	179,831	완료
익산쌍릉 발굴조사	발굴조사, 수목정비	136,041	128,054	7,987	완료
익산 심곡사 종합학술조사	종합학술용역	36,560	31,360	5,200	완료
익산 나바위성당 미관개선	노출전선관 및 소방배관 지중화	35,000	0	35,000	정비추진중 (2020.3~2020.5)	명시 이월
익산토성 정비	발굴지 정비	600,000	0	600,000	정비추진예정 (2020.4~2020.8)	명시 이월
익산쌍릉 정비	발굴조사 및 발굴지 정비	853,183	549,457	303,726	정비추진중 (2019.11~2020.5)	명시 이월
연안이씨종중문적 보존처리	보존처리 및 보관함제작	130,000	31,481	98,519	정비추진중 (2019.11~2020.9)	명시 이월
익산 입점리 고분 탐방로 정비	탐방로 정비	200,000	184,047	15,953	완료
2019년 익산 나바위 성당 정비	화장실 및 강당권역정비	430,000	426,500	3,500	완료
연동리 석조여래좌상 불단정비	불단정비 설계	42,857	11,026	31,831	완료
심곡사 대웅전 주변정비	공중화장실 건립	190,202	173,505	16,697	완료
숭림사 보광전 목조 석가여래좌상 주변정비	우화루 내부정비 및 가설창고 설치	35,208	32,947	2,261	완료
이병기선생 생가 정비 및 정밀실측조사	지붕보수, 정밀실측조사	193,093	193,093	0	완료
여산 숲정이 순교성지 주변정비	성지정비	464,684	462,544	2,140	완료
심곡사 대웅전 주변정비	배수로 석축보수	50,000	47,017	2,983	완료
숭림사 보광전 목조 석가여래좌상 주변정비	종각보수	62,909	62,909	0	완료
태봉사 삼존석불 주변정비	석축보수	34,123	34,123	0	완료
익산 숭림사 보광전 재난방지시설 구축	호스릴 소화전 설치 등	200,000	144,485	55,515	완료
익산 나바위성당 재난방지시설 구축	방범시스템 개선 및 보강	200,000	166,910	33,090	완료
원불교 익산성지 긴급보수	흰개미 방제처리	70,000	57,589	12,411	완료
익산 김병순 고택 긴급보수	흰개미 방제처리	100,000	11,415	88,585	정비추진중 (2019.12~2020.3)	명시 이월 (완료)
왕궁리유적전시관 ICT체험 콘텐츠개발	백제왕궁 홍보영상제작	95,000	95,000	0	완료
문화특화지역 조성사업	지역문화자원을 활용한지역 문화활성화	815,000	815,000	0	완료
문화재 야행사업	야간 문화재활용프로그램 운영	354,000	354,000	0	완료
향교서원 활용사업	향교 문화재활용 프로그램 운영	60,000	60,000	0	완료
생생문화재 활용사업	문화재활용 프로그램 운영	30,000	30,000	0	완료
백제왕궁 소원등 날리기	문화재활용 프로그램 운영	30,000	30,000	0	완료
미륵사지방재IOT 시스템구축	CCTV증설 및 IOT시스템 구축	300,000	0	300,000	추진중 (2019.11~2020.5)	명시 이월
미륵사지 재난방재 시스템 구축	미륵사지 소방 시설 설치	276,970	259,726	17,244	완료 (2018.12~2019.5)
문학인과 함께하는 백제역사문화탐방	문학인 대상 팸투어	30,000	30,000	0	완료
백제역사유적지구 학술포럼 개최	학술포럼 개최	60,000	60,000	0	완료
백제역사유적지구 통합모니터링 시스템 구축	통합모니터링 시스템 구축	30,000	30,000	0	완료
백제역사유적지구 교육교재 제작	홍보용 교육교재 제작	30,000	30,000	0	완료
명사와 함께하는 백제역사유적지구 특강	홍보동영상 제작	50,000	50,000	0	완료
백제역사유적지구 항공 영상(4계절)콘텐츠 제작	항공영상 콘텐츠 제작	60,000	60,000	0	완료
국내외 팸투어 운영	국내외 팸투어 운영	50,000	50,000	0	완료
백제역사유적지구 홍보용 광고영상 제작	홍보용 광고영상 제작	50,000	50,000	0	완료
백제역사유적지구 국내외 사진 전시회 개최	국내외 사진전 개최	60,000	60,000	0	완료
미륵사지 석탑 보수정비 준공 행사	미륵사지 석탑 준공 기념 법회	77,000	77,000	0	완료
익산역사문화 고문헌 번역서 발간사업	익산 금마지 고문서 역주	45,000	45,000	0	완료 (2018.10~2019.4.)
고도이미지 찾기사업	한옥 및 담장․대문 / 가로변외관정비주민지원사업	1,947,143	1,352,969	594,174	한옥10준공(840백만원) 한옥5기성(210백만원) 담장14준공(291백만원) 간판6준공(12백만원)	계속비 이월
고도이미지 찾기사업(이주단지)	한옥 및 담장․대문주민지원사업	880,000	320,000	560,000	한옥4준공(320백만원)	명시 사고
고도가로경관 개선사업	가로변보차도정비, 간판정비 담장정비,안길포장	1,465,008	1,377,488	87,520	추진중(2018.2~2021.12)	계속비 이월
서동생가터 역사공원조성사업	서동생가터 역사공원조성사업	1,916,732	598,838	1,317,894	추진중(2017.1~2023.12)	계속비 이월
객사터발굴을 위한 면사무소 이전토지매입	토지매입	492,000	227,592	264,408	추진중 (2017.5~2020.12)	명시 이월
금마전선 지중화사업	금마주요가로변 전선지중화	39,199	39,199	0	전선지중화 정산추진중 (2019.5~2020.12)

7. 2019 각종 민원(진정, 건의, 청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

연번	각종 민원 접수내역	조치(처리)결과	비고
1	•접수일자 : 2019. 10. 15. •접수내용 : 미륵산 약수터 진입로 포장요청	•미륵산 약수터 진입로 포장건에 대하여 해당 위치는 사유재산으로 포장하기 어려운 상황임. •토지매입을 통해 추후 정비할 예정임	토지 매입 추진 중

8. 기금 운용 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전형수	□

해  당  없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		문화재시설계장		박성일	□

□ 위원회 설치 및 운영현황                               (단위: 천원)

위원회명	설치근거	구성 인원	임기	연임 제한	운영횟수			수당지급현황
					계	대면	서면	예산액	지급액	불용액
국가무형문화재 통합전수교육관 운영위원회	익산국가무형문화재통합전수교육관설치 및 운영조례 제6조	8	2	1회	0			-	-	-
익산시 향토유적 심의 위원회	익산시 향토유적 보호조례 제3조	11	2	-	1	1		-	400	-
익산시 고도 보존육성지역 심의위원회	익산시 고도보존 육성 및 주민지원에 관한 조례 제5조	15	2	-	14	14		-	6,310	-

□ 익산시 국가무형문화재 통합전수교육관 운영위원회 위원 명단

직위	소속	소속기관 직위	성명	위촉일	임 기	비고
위원장	익산시청	부 시 장	박철웅	당연직
위원	익산시청	경제관광국장	조창구	당연직
〃	익산시의원	시 의 원	강경숙	2019. 2. 28.	2년
〃	이리농악 보존회장	보존회장	김익주	2019. 2. 28.	2년
〃	이리향제줄풍류 보존회장	보존회장	오석신	2019. 2. 28.	2년
〃	전)익산문화원장	전)익산 문화원장	김복현	2019. 2. 28.	2년
〃	원광대국악과	교수	우종양	2019. 2. 28.	2년
〃	원광대학교 프라임사업단	연구교수	문이화	2019. 2. 28.	2년

직위	소속	소속기관 직위	성명	위촉일	임기	비고
위원장	익산시청	부시장	박철웅	당연직
위원	익산시청	경제관광국장	조창구	당연직
〃	원광대학교 고고미술사학과	교수	최완규	2019.5.1.	2년
〃	원광대학교 건축학과	교수	홍승재	2019.5.1.	2년
〃	전북대학교 건축공학과	교수	남해경	2019.5.1.	2년
〃	원광대학교 고고미술사학과	교수	김정희	2019.5.1.	2년
〃	예원예술대학교 문화재보존예술학과	교수	전경미	2019.5.1.	2년
〃	익산고등학교	교장	임홍낙	2019.5.1.	2년
〃	원광대학교 마한백제문화연구소	책임연구원	문이화	2019.5.1.	2년
〃	국립익산박물관	관장	정상기	2019.5.1.	2년

□ 익산시향토유적심의위원회 위원 명단

□ 익산시 고도보존육성지역심의위원회 위원 명단

직위	소속	소속기관 직위	성명	위촉일	임 기	비고
위원장	원광대 건축학과	교수	홍승재	2018.11.20	2년
부위원장	원광대 건축학과	교수	윤충렬	2018.11.20	2년
위 원	익산시의회	의원	김태열	2018.11.20	2년
〃	익산시의회	의원	소병직	2018.11.20	2년
〃	고도보존 주민협회회	이사장	민두희	2018.11.20	2년
〃	금마면 이장협의회	회장	이시형	2018.11.20	2년
〃	금마면 번영회	회장	김 구	2018.11.20	2년
〃	금마면 주민 자치위원회	위원장	조우형	2018.11.20	2년
〃	전북대 도시공학과	교수	김현숙	2018.11.20	2년
〃	원광대 건축학과	교수	안선호	2018.11.20	2년
〃	마한백제문화연구소	책임연구원	이문형	2018.11.20	2년
〃	마한백제문화연구소	책임연구원	문이화	2018.11.20	2년
〃	군산대 건축학과	교수	송석기	2018.11.20	2년
〃	전주대 건축학과	교수	김준영	2018.11.20	2년
〃	원광대 건축학과	교수	박연정	2018.11.20	2년

10. 용역사업 관련

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전형수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

□ 사업조서

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	용역업체	용역비	계약방법	추진사항
계	15개 사업		2,122,595
학술연구 용역	근대문화유산 실측조사 및 DB구축	㈜바른종합 건축사사무소	192,530	일반경쟁	완료
학술연구 용역	덕기동 유적 발굴조사	(재)전북문화재 연구원	119,290	수의계약	완료
학술연구 용역	마한 실체 규명을 위한 시･발굴조사	원광대학교 산학협력단	179,183	수의계약	추진중 (2020.3~2020.7)
설계용역	왕궁리유적 전시관 보수 설계용역	㈜금성건축	600,000	일반경쟁	추진중 (2019.6~2020.4)
학술연구용역	세계유산 왕궁리유적 완충구역 보존정비계획	주식회사 인우	19,665	수의계약	완료
학술연구 용역	익산쌍릉 발굴조사	원광대학교 산학협력단	434,657	일반경쟁	완료
설계용역	익산토성 정비설계 및 종합정비계획수립	㈜도시건축사 사무소	95,000	일반경쟁	추진중 (2019.2~2020.4)
학술연구 용역	심곡사 종합학술조사	㈜바른종합 건축사사무소	44,800	일반경쟁	완료
설계용역	익산쌍릉 정비설계 및 종합정비계획수립	㈜도시건축사 사무소	95,000	일반경쟁	추진중 (2019.2~2020.4)
설계용역	이병기선생 생가 정비설계 및 정밀실측조사	㈜아리건축사 사무소	57,200	일반경쟁	완료
전산개발 용역	왕궁리유적전시관ICT체험 콘텐츠개발	㈜제로온	190,000	협상계약	완료
학술연구용역	익산역사문화 고문헌 번역서 발간사업	원광대학교 산학협력단	39,600	수의계약	완료
학술연구 용역	익산 황등제 성격과 실체확인 기초학술 조사용역	(재)전북문화재 연구원	18,000	수의계약	완료
계획수립 용역	고도지구 탑리마을 주거 경관개선사업 기본계획 수립 용역	원광대학교 산학협력단	18,000	수의계약	완료
설계 용역	금마 고도지구 간판 정비사업(2단계) 실시설계용역	홈애드기획	19,670	수의계약	완료

11. 인․허가 민원처리 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□

○ 고도지구내 행위허가

구분	허가 신청				처리 결과								비고
	계	신축	증축	기타	계		신축		증축		기타
					허가	불허가	허가	불허가	허가	불허가	허가	불허가
2019	35	26	1	8	35		26		1		8

12. 각종공사 설계 변경상황(문화재 보수정비)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민		□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

일자	사업명	계약액	변경액	증 감	계약자	공사기간	변경사유등
계	21개 사업	7,722,152	8,830,705	1,108,553
2019.3.15.	미륵사지 기단부및 배수로 정비공사	1,870,964	2,081642	210,678	㈜ 진수 종합건설	2017.12.8.~ 2019.3.31.	문화재청 기술지도 내용반영 물량증가
2019.3.21.	2018년 익산 쌍릉 정비공사	110,038	128,438	18,400	㈜고택	2019.1.25.~ 2019.5.14.	전문가 현지자문 내용반영
2019.3.28.	익산 중앙동 구 삼산의원 이전복원공사	1,693,513	1,686,349	-7,164	㈜ 조양	2017.5.2.~ 2019.4.7.	문화재청 기술지도 내용반영
2019.5.12.	심곡사 대웅전 주변정비공사	243,583	256,400	12,817	(유) 건웅종합건설	2018.12.24.~ 2019.5.25.	전문가 현지자문 내용반영
2019.6.15.	용안동헌 주변정비공사	128,410	143,737	15,327	(유) 강운	2019.2.11.~ 2019.7.2.	주민의견 반영
2019.6.17.	미륵사지 재난방재시스템구축 (전기공사)	28,376	57,805	29,429	주식회사 태흥전력	2018.12.14.~ 2019.6.24.	소화전 수량 증가
2019.6.17.	미륵사지 재난방지시스템 구축 (소방공사)	177,326	208,217	30,891	유한회사 신화전설	2018.12.19.~ 2019.6.29.	소화전 수량 증가 및 입회조사 등 추가
2019.7.10.	익산 나바위성당 보수정비공사	443,652	542,290	98,638	혜전건설 주식회사	2019.4.8.~ 2019.7.13.	문화재청기술지도 내용반영 물량증가
2019.7.26.	숭림사 보광전 목조석가여래좌상 주변정비공사	53,482	57,630	4,148	㈜대창건설	2019.6.3.~ 2019.8.15.	전문가 현지자문 내용반영
2019.9.5.	이병기선생 생가 보수정비공사	104,706	142,662	37,956	(유)남전 종합건설	2019.6.25.~ 2019.10.14.	전문가 현지자문 내용반영 물량증가
2019.10.31.	2018년 익산 왕궁리유적 정비공사	1,099,618	1,345,006	245,388	성진토건 주식회사, (유)서림 문화재	2019.1.30.~ 2019.11.25.	문화재청 기술지도 내용반영 배수로 일부구간 연장시공
2019.11.12.	익산 주현동 구 일본인 농장사무실 보수정비공사	102,519	140,684	38,165	㈜문화재 종합건설	2019.3.18.~ 2019.11.25.	문화재청 기술지도 내용반영 물량증가
2019.12.11.	여산 숲정이 순교성지 주변정비공사	243,899	250,833	6,934	(유)성연 건설	2019.9.6.~ 2020.4.14.	전문가 현지자문 내용반영 물량 변경
2019.12.11.	익산 미륵사지 탐방로 및 약수터 화장실 보수정비공사	224,366	286,308	61,942	㈜영화 문화재	2019.8.5.~ 2020.3.13.	전문가 현지자문 내용반영 공사구간 증가
2019.12.11.	익산 숭림사 재난방지시설 구축공사	118,626	130,010	11,384	상명이엔씨 (주)	2019.10.7.~ 2019.12.20.	전문가 현지자문 내용반영
2019.12.26.	익산 미륵사지 광장정비공사	404,030	679,620	275,590	(유) 건웅 종합건설	2019.6.26.~ 2020.6.25.	전문가 현지자문 내용반영
2019.7.11.	세계유산 수목 전지사업	8,723	9,981	1,258	유한회사 양지조경	2019.6.25.~ 2019.7.19.	수목전지 수량 증가
2019.6.13.	금마 금마길 간판정비사업	245,550	256,280	10,730	㈜문화	2019.2.7.~ 2019.6.21.	현장여건 변화 간판물량증가
2019.5.29.	금마 고도길 간판정비사업	186,893	193,555	6,662	(유)포디헤윰	2019.2.11.~ 2019.7.2.	현장여건 변화 간판물량증가
2019.7.22.	금마 옥룡천 인도교 설치사업	160,979	162,008	1,029	(유)신화 종합선설	2019.3.14.~ 2019.8.1.	주민요구 포장물량 반영
2019.12.4.	금마 고도지구 미륵사지1로 간판정비사업	72,899	71,250	-1,649	(유)인디 테크	2019.10.14.~ 2019.12.12.	현장여건 변화 간판물량증가

13. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	32개 사업	26,929,893	19,713,280	7,216,703
용안동헌 주변정비	용안동헌 전면부 정비	200,000	193,023	6,977	완료
익산 나바위성당 역사관 정비	역사관 정비	180,000	177,659	2,341	완료
2017년 왕궁리 유적 정비	발굴지 정비	4,487,143	4,487,143	0	완료
2018년 왕궁리 유적 정비	발굴지 정비	3,514,300	3,163,323	350,977	완료	계속비 이월
2019년 왕궁리 유적정비	발굴지 정비	3,071,428	1,499,497	1,571,931	정비추진중 (2019.12~2020.11)	계속비 이월
2018년 미륵사지정비	기단부 정비	3,180,000	2,727,347	452,653	완료	계속비 이월
2019년 미륵사지정비	기단부 정비	4,371,429	1,793,933	2,577,496	정비추진중 (2019.9~2020.9)	계속비 이월
미륵사지 당간 지주 보존처리	보존처리	70,000	64,782	5,218	완료
중앙동 구 삼산 의원 이전복원	이전·복원	970,570	961,382	9,188	완료
2018년 제석사지 정비	건물지 정비	498,570	44,520	454,050	정비추진중 (2019.9~2020.5)	계속비 이월
익산 주현동 구 일본인농장사무실 보수정비	지붕 및 외벽보수	185,328	143,713	41,615	완료
익산 구 춘포역사 정비	보존활용계획 수립 및 보수정비	90,600	80,159	10,441	완료
2018년 익산 나바위성당 정비	사무실･사제관 권역 정비	413,238	354,656	58,672	완료
익산 나바위성당 미관개선	노출전선관 및 소방배관 지중화	35,000	0	35,000	정비추진중 (2020.3~2020.5)	명시 이월
익산토성 정비	발굴지 정비	600,000	0	600,000	정비추진예정 (2020.4~2020.8)	명시 이월
익산쌍릉 정비	발굴조사 및 발굴지 정비	853,183	549,457	303,726	정비추진중 (2019.11~2020.5)	명시 이월
연안이씨종중문적 보존처리	보존처리 및 보관함제작	130,000	31,481	98,519	정비추진중 (2019.11~2020.9)	명시 이월
익산 입점리 고분 탐방로 정비	탐방로 정비	200,000	184,047	15,953	완료
2019년 익산 나바위 성당 정비	화장실 및 강당권역정비	430,000	426,500	3,500	완료
심곡사 대웅전 주변정비	공중화장실 건립	190,202	173,505	16,697	완료
숭림사 보광전 목조 석가여래좌상 주변정비	우화루 내부정비 및 가설창고 설치	35,208	32,947	2,261	완료
여산 숲정이 순교성지 주변정비	성지정비	464,684	462,544	2,140	완료
심곡사 대웅전 주변정비	배수로 석축보수	50,000	47,017	2,983	완료
숭림사 보광전 목조 석가여래좌상 주변정비	종각보수	62,909	62,909	0	완료
태봉사 삼존석불 주변정비	석축보수	34,123	34,123	0	완료
익산 숭림사 보광전 재난방지시설 구축	호스릴 소화전 설치 등	200,000	144,485	55,515	완료
익산 나바위성당 재난방지시설 구축	방범시스템 개선 및 보강	200,000	166,910	33,090	완료
원불교 익산성지 긴급보수	흰개미 방제처리	70,000	57,589	12,411	완료
익산 김병순 고택 긴급보수	흰개미 방제처리	100,000	11,415	88,585	정비추진중 (2019.12~2020.3)	명시 이월 (완료)
미륵사지방재IOT 시스템구축	CCTV증설 및 IOT시스템 구축	300,000	0	300,000	추진중 (2019.11~2020.5)	명시 이월
미륵사지 재난 방지시스템 구축	미륵사지 소방 시설설치	276,970	259,726	17,244	완료
고도가로경관 개선사업	가로변보차도정비, 간판정비 담장정비,안길포장	1,465,008	1,377,488	87,520	공사진행중(2018.2~2021.12)	계속비 이월

14. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

단 체 명	사 업 명	세목	예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
합 계	18개 단체 / 29개사업		2,546,796	2,516,796	30,000
이리농악보존회	전수교육 육성사업	민간경상 사업보조	42,000	42,000	0
	대한민국 농악축제	민간경상 사업보조	14,000	14,000	0
	전수교육관 활성화사업	민간경상 사업보조	16,450	16,450	0
	전수교육관운영	민간단체법정 운영비보조	7,453	7,453	0
이리향제줄풍류 보존회	전수교육 육성사업	민간경상 사업보조	30,000	30,000	0
	전수교육관 활성화사업	민간경상 사업보조	15,240	15,240	0
	전수교육관운영	민간단체법정 운영비보조	7,453	7,453	0
익산기세배 보존회	전수교육 육성사업	민간경상 사업보조	12,000	12,000	0
	도지정 무형문화재 공개행사비	민간경상 사업보조	3,400	3,400	0
	전수교육관운영	민간단체법정 운영비보조	10,000	10,000	0
익산목발노래 보존회	전수교육 육성사업	민간경상 사업보조	12,000	12,000	0
	도지정 무형문화재 공개행사비	민간경상 사업보조	3,400	3,400	0
익산성당포구농악	도지정 무형문화재 공개행사비	민간경상 사업보조	3,400	3,400	0
익산문화관광재단	문화특화지역 조성사업	민간경상 사업보조	815,000	815,000	0
원광대학교 산학협력단(마한백제문화연구소)	역사고도 익산의 정체성 확립 학술회의	민간경상 사업보조	25,000	25,000	0
익산고도육성세계유산 보전관리주민 협의회	익산고도육성세계유산보전관리주민협의회운영지원	민간단체법정운영비보조	37,000	37,000	0
익산고도육성세계유산 보전관리주민 협의회	고도마을가꾸기	민간경상 사업보조	40,000	40,000	0
전북문화재연구원	고도육성아카데미	민간경상 사업보조	60,000	60,000	0
대한불교조계종 관음사	관음사 목조보살입상 보호각 건립 설계	민간자본사업보조	100,000	100,000	0
	관음사 목조보살입상 보호각 건립	민간자본사업보조	900,000	900,000	0
대한불교조계종 심곡사	심곡사 수장고 건립 설계	민간자본사업보조	100,000	100,000	0
충간공 보물 제651호 박물관	육각정 보수 설계	민간자본사업보조	16,000	16,000	0
함열향교	노후 화장실 증축 및 개보수	민간자본사업보조	30,000	0	30,000	명시 이월
(사)교육문화중심 아이행복	향교서원 문화재 활용사업	민간경상 사업보조	60,000	60,000	0
길청소년 활동연구소	생생문화재 활용사업	민간경상 사업보조	30,000	30,000	0
	백제왕궁 천년 별밤캠프	민간경상 사업보조	20,000	20,000	0
	백제왕궁 소원등 날리기	민간경상 사업보조	30,000	30,000	0
원광대학교 산학협력단 (대안문화연구소)	문학인과 함께하는 백제역사문화탐방	민간경상 사업보조	30,000	30,000	0
대한불교조계종 제17교구본사 금산사	미륵사지 석탑 보수정비 준공행사	민간경상 사업보조	77,000	77,000	0

▣ 보조금 지원 책정 기준 지급근거

◦ 고도 보존 및 육성에 관한 특별법 제16조 및 제17조의2

◦ 문화재보호법 제72조

◦ 익산시 보조금 관리에 관한 조례 제6조

◦ 비영리민간단체지원법 제6조

◦ 문화예술진흥법 제3조

15. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				집 행 액				잔 액	비고
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
31개 사업	30,623,851	20,025,260	4,902,979	5,689,612	22,274,000	14,340,790	3,636,798	4,296,412	8,347,523
2017년 왕궁리 유적 정비	4,487,143	3,141,000	673,071	673,071	4,487,143	3,141,000	673,071	673,071	0	완료
2018년 왕궁리 유적 정비	3,514,300	2,460,010	527,145	527,145	3,163,323	2,214,326	474,498	474,499	350,977	계속비 이월
2019년 왕궁리 유적정비	3,071,428	2,150,000	460,714	460,714	1,499,497	1,049,647	224,925	224,925	1,571,931	계속비 이월
백제역사유적지구 문화재안내판 교체	100,000	70,000	15,000	15,000	89,078	62,355	13,362	13,361	10,922	완료
왕궁리유적 전시관 보수	700,000	210,000	245,000	245,000	301,401	90,420	105,490	105,491	398,599	계속비 이월
2018년 미륵사지 정비	3,180,000	2,226,000	477,000	477,000	2,727,347	1,909,143	409,102	409,102	452,653	계속비 이월
2019년 미륵사지 정비	4,371,429	3,060,000	655,714	655,715	1,793,933	1,255,753	269,090	269,090	2,577,496	계속비 이월
중앙동 구 삼산 의원 이전복원	970,570	485,285	242,642	242,643	961,382	480,691	240,345	240,346	9,188	완료
2018년 제석사지 정비	498,570	348,999	74,786	74,785	44,520	31,164	6,678	6,678	454,050	계속비 이월
익산 주현동 구 일본인농장사무실 보수정비	185,328	92,664	46,332	46,332	143,713	71,856	35,929	35,928	41,615	완료
익산 구 춘포역사 정비	90,600	63,420	13,590	13,590	80,159	56,111	12,024	12,024	10,441	완료
2018년 익산 나바위성당 정비	413,328	289,330	61,999	61,999	339,866	237,906	50,980	50,980	77,134	완료
익산토성 발굴조사	179,831	125,882	26,974	26,975	0	0	0	0	179,831	완료 (18명시이월)
익산쌍릉 발굴조사	136,041	95,229	20,406	20,406	128,054	89,638	19,208	19,208	7,987	완료
익산토성 정비	600,000	420,000	90,000	90,000	0	0	0	0	600,000	명시이월
익산쌍릉 정비	859,183	597,228	127,977	127,978	549,457	384,619	82,419	82,419	303,726	명시이월
연안이씨종중문적 보존처리	130,000	91,000	19,500	19,500	31,481	22,037	4,722	4,722	98,519	명시이월
익산 입점리 고분 탐방로 정비	200,000	140,000	30,000	30,000	184,047	128,833	27,607	27,607	15,953	완료
2019년 익산 나바위 성당 정비	430,000	301,000	64,500	64,500	426,500	298,550	63,975	63,975	3,500	완료
심곡사 대웅전 주변정비	190,202	0	95,101	95,101	173,505	0	86,752	86,753	16,697	완료
이병기선생 생가 정비 및 정밀실측조사	193,093	0	96,547	96,547	193,093	0	96,547	96,547	0	완료
여산 숲정이 순교성지 주변정비	464,684	0	232,342	232,342	462,544	0	231,272	231,272	2,140	완료
익산 숭림사 보광전 재난방지시설 구축	200,000	140,000	18,000	42,000	144,485	101,140	13,003	30,342	55,515	완료
익산 나바위성당 재난방지시설 구축	200,000	140,000	18,000	42,000	166,910	116,837	15,022	35,051	33,090	완료
익산 김병순 고택 긴급보수	100,000	100,000	0	0	11,415	11,415	0	0	88,585	명시이월 (완료)
미륵사지 방재IOT시스템 구축	300,000	210,000	27,000	63,000	11,964	8,375	1,077	2,512	288,036	명시이월
미륵사지 재난 방지시스템 구축	276,970	193,879	41,545	41,546	259,726	181,808	38,959	38,959	17,244	명시이월 (완료)
문화특화지역 조성사업	815,000	326,000	147,000	342,000	815,000	326,000	147,000	342,000	0	완료
문화재 야행사업	354,000	160,000	48,000	146,000	354,000	160,000	48,000	146,000	0	완료
고도이미지찾기사업(한옥및담장,가로변외관지원)	1,947,143	1,363,000	175,243	408,900	1,352,969	947,079	121,767	284,123	594,174	계속비이월
고도가로경관 개선사업	1,465,008	1,025,334	131,851	307,823	1,377,488	964,087	123,974	289,427	87,520	계속비이월

16. 2019년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

□ 명시 및 사고이월 내역 : 19건(명시 15, 사고 4)

□ 명시이월 내역 : 15건

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	추진율 (%)	준 공 (완료예정일)	추 진 내 역
계	2,854,472	1,703,010	1,151,552
익산 근대문화유산 실측조사 및 DB구축	200,000	0	200,000	90	2020. 4.	완료
덕기동 유적 발굴조사	146,928	119,290	27,638	100	2019. 3. 8.	완료
익산 주현동 구 일본인농장사무실 보수정비	185,328	143,713	41,615	100	2019. 11. 29.	완료
익산 구 춘포역사 정비	90,600	80,159	10,441	100	2019. 11. 26.	완료
2018년 익산 나바위성당 정비	413,238	354,656	58,672	100	2019. 7. 18.	완료
익산토성 발굴조사	179,831	0	179,831	100	2018. 12. 12.	완료 (집행잔액)
익산쌍릉 발굴조사	136,041	128,054	7,987	100	2019. 4. 8.	완료
익산 심곡사 종합학술조사	36,560	31,360	5,200	100	2019. 6. 25.	완료
심곡사 대웅전 주변정비	190,202	173,505	16,697	100	2019. 5. 20.	완료
숭림사 보광전 목조 석가여래좌상 주변정비	35,208	32,947	2,261	100	2019. 5. 2.	완료
익산관음사목조 보살입상보호각 건립설계용역	100,000	100,000	0	100	2020. 12. 31.	완료
미륵사지 재난방지시스템구축사업(방범)설계용역	18,566	0	18,566	0	2019. 10. 29. (설계승인)	완료
미륵사지 재난 방재시스템 구축	276,970	259,726	17,244	100	2019. 6. 29	완료
익산 금마지 고문서 역주 학술용역	45,000	39,600	5,400	100	2019. 4. 2	완료
고도이미지찾기사업 한옥 및 담장(자체)	800,000	240,000	560,000	30	2020. 12. 31.	추진중

□ 사고이월 내역 : 4건

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	추진율 (%)	준 공 (완료예정일)	추 진 내 역
계	1,245,570	1,236,382	9,188
중앙동 구 삼산 의원 이전복원	970,570	961,382	9,188	100	2019. 4. 22.	완료
전통사찰(심곡사) 편의시설 지원	100,000	100,000	0	100	2019. 5. 20.	완료
왕궁리유적전시관 ICT체험 콘텐츠 개발	95,000	95,000	0	100	2019. 3. 11	완료
고도이미지찾기사업 한옥 및 담장(자체)	80,000	80,000	0	100	2019.12.20	완료

17. 2020년도 명시이월 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	명 시 이월액	명시이월사유	비 고
13개사업	1,970,869
익산 황등제 성격과 실체확인 기초학술조사 용역	18,000	준공시기(2020. 1월)미도래	완료
마한 실체 규명을 위한 시발굴조사	212,000	준공시기(2020. 7월)미도래
익산 쌍릉 정비	297,209	준공시기(2020. 6월) 미도래
익산 토성 정비	600,000	준공시기(2020. 8월) 미도래
연안이씨 종중문적 보존처리 및 보관함 제작	98,519	준공시기(2020. 9월) 미도래
익산 나바위성당 노출전선관 및 소방배관 지중화	35,000	도급업체 계약내용 미이행으로 인한 계약해지, 준공시기(2020. 5월) 미도래
국가지정 및 등록문화재 보수 정비시설부대비	148	시설공사 준공사가 미도래로 인한 시설부대경비 집행 미도래
익산 김병순 고택 흰개미 방제처리공사	88,585	준공시기(2020. 3월) 미도래	완료
함열향교 시설개선 지원사업	30,000	준공시기(2020. 4월) 미도래	완료
무형문화재 전수시설 개선지원사업	12,000	준공시기(2020.3월) 미도래	완료
미륵사지방재IOT시스템 구축공사	300,000	준공시기(2020. 5월)미도래
미륵사지 야외음수대 설치	15,000	준공시기(2020. 1월)미도래	완료
객사터발굴을위한 면사무소 이전토지매입	264,408	토지매입협의중 2020상반기 토지수용재결

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	세계유산계장		강숙자	□

(단위 : 천원)

구분		예산과목		예산액	요구액		사유	비고
		세부	통계목		감	증
당초		문화재야행사업	307-02 민간경상 사업보조	300,000	300,000	-	사업주체 변경(익산시 직영)에 따른 예산 전용
변경	예산전용	문화재야행사업	201-03 행사운영비	288,000	-	288,000
			202-01 국내여비	2,000	-	2,000
	예산변경		301-09 행사실비 보상금	10,000	-	10,000

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업비	공사기간		연장사유
		당초	변경
심곡사 대웅전 주변정비공사	246,400	2018.12.24.~ 2019.5.18.	2018.12.24.~ 2019.5.25.	전문가 자문기간 소요 및 추가공사로 인한 공사 기한(7일) 연장
익산 나바위성당 보수정비공사	443,652	2019.4.8.~ 2019.6.6.	2019.4.8.~ 2019.7.13.	전문가 자문기간 소요 및 추가공사로 인한 공사 기한(30일) 연장
숭림사 보광전 목조석가여래좌상 주변정비공사	57,630	2019.6.3.~ 2019.7.31.	2019.6.3.~ 2019.8.15.	전문가 자문기간 소요 및 안전을 위한 난간의 제작 설치에 따른 공사기한 (15일)연장
익산 주현동 구 일본인 농장사무실 보수정비공사	140,684	2019.3.18.~ 2019.10.31.	2019.3.18.~ 2019.11.25.	전문가 자문기간 소요 및 추가공사로 인한 공사기한(20일) 연장

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전형수	□

해  당  없  음

21. 국․도비 반납 현황 및 사유(2019년도 반납건)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집행액	반납액	반납사유	비고
계	10,209,698	8,657,247	1,385,468
2015년 문화재 긴급보수사업	30,000	27,786	2,290	집행잔액 및 이자
2017년 문화재 긴급보수사업	140,000	139,777	1,105	이자
2017년 재난 안전관리사업	181,696	179,516	1,543	집행잔액
2017년 전통사찰 편의시설 지원사업	102,400	102,380	10	집행잔액
2017년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업	10,900	10,196	528	집행잔액
2017년 전통사찰 보수정비사업	48,000	47,724	207	집행잔액
2018년 도지정문화재 보수정비사업	985,372	843,594	70,889	집행잔액
2018년 목조문화재 U-안전관리시스템 유지관리	4,293	3,751	542	집행잔액
2018년 문화재 보수정비사업	4,737,428	4,300,763	384,633	집행잔액 및 이자
2018년 문화재 재난 안전관리사업	116,966	111,805	4,534	집행잔액
2018년 전수교육관 건립지원사업	150,000	149,598	518	집행잔액 및 이자
2018년 문화재 야행사업	200,000	199,993	513	집행잔액 및 이자
2018년 생생문화재 사업	27,500	27,500	65	집행잔액 및 이자
2018년 향교서원 문화재 활용사업	38,000	38,000	72	집행잔액 및 이자
2017년~2018년 세계유산활용 및 홍보사업	830,000	777,327	27,793	집행잔액 및 이자
2016년 고도 이미지찾기사업	2,457,143	1,547,537	738,158	집행잔액 및 이자
2017지자체 한옥건축사업	150,000	150,000	152,068	국토부사업취지미부합(이자포함)

22. 2019년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전형수	□

해  당  없  음

23. 2019년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전형수	□

해  당  없  음

24. 2019년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	구분	미집행사유	비고
미륵사지 재난방지시스템구축사업(방범)설계용역	18,566	국비 12,996 도비 1,671 시비 3,899	문화재청 설계 승인기간 과다소요 대비이월 하였으나, 적정설계로 이월액 미사용	명시이월
익산토성발굴조사	179,831	국비 125,882 도비 26,974 시비 26,975	전문가 자문 및 문화재위원회 심의 장기간 소요로 연내 미집행	명시이월

25. 2019년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전형수	□

해  당  없  음

26. 소송 사건 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□

사 건 명	사 건 개 요	원 고	피 고	접수일	추진사항 (판․종결일)
전주지방 법원 2018구합774	수용보상금 증액청구	한상순	익산시장	2018.04.02.	원고 일부승소 (법원 감정평가의 증가 지급(137,605원) (2019. 8. 29.)

27. 시 홈페이지 접수 민원처리 실태현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

연번	홈페이지 접수 민원	조치(처리)결과	비고
1	•접수일자 : 2019. 2. 19. •접수내용 : 미륵산 등산로 의자 보수요청	•미륵산 등산로 의자가 파손되어 이용에 불편을 드린 것에 대해 양해말씀 드리며, 조속한 정비를 통해 이용에 불편함이 없도록 하겠습니다.	정비 완료
2	•접수일자 : 2019. 3. 11. •접수내용 : 미륵산 등산로 계단보수 요청	•미륵산 등산로 계단 파손으로 인하여 이용에 불편을 드린 것에 대해 양해말씀 드리며, 현장확인 후 조속한 정비를 통해 이용에 불편함이 없도록 하겠으며, 앞으로도 지속적으로 관리하여 쾌적하고 안전한 관람환경을 제공하도록 하겠습니다.	정비 완료
3	•접수일자 : 2019. 4. 18. •접수내용 : 별장가든 화장실 에어건 수리요청	•미륵산 등산로 입구(별장한증막 방향)에 설치되어 있는 에어건 고장으로 이용에 불편을 드린 것에 대해 양해말씀 드리며, 현재 기계노후로 인한 안전사고 발생 위험이 있어 작동을 중단 시켜놓은 상태이며 신형에어건을 설치하기 위해 추경에 예산을 요청하여 놓은 상황으로 예산편성 시 조속히 에어건을 설치하여 이용에 불편함이 없도록 하겠습니다.	설치 완료
4	•접수일자 : 2019. 4. 28. •접수내용 : 미륵산 약수터 등산로 포장요청	• 미륵산 약수터 길 포장요청에 대해서 인허가 및 예산문제 등을 종합적으로 검토하여 탐방로 이용에 불편이 최소화되도록 노력하겠습니다.	토지 매입 추진중
5	•접수일자 : 2019. 5. 2. / 5. 7. / 7. 31. •접수내용 : 미륵산 등산로 에어건 관리	• 미륵산 등산로 화장실(별장가든 앞)에 설치되어 있는 에어건은 현재 안전사고 발생으로 인하여 전원을 차단해 놓은 상태입니다. 현재 에어건 교체를 위한 예산을 건의하였고, 확보가 되는대로 교체하고자 합니다. 당분간 사용이 제한되어 불편하시더라도 이해하여 주시기 바랍니다.	설치 완료
6	•접수일자 : 2019. 8. 25. •접수내용 : 미륵산 QR코드 보수	• 미륵사지 QR코드 보수와 관련 2019. 8.30. 전수조사를 실시하여 훼손된 미륵사지 QR코드(19개소)를 즉시 제거 완료하였으며, 재질을 변경하여 새로 부착 완료하겠습니다.	보수 완료
7	•접수일자 : 2019. 10. 4. •접수내용 : 익산문화재야행 행사장 이동셔틀 불편 관련	•담당자 교육을 통해 셔틀버스 승,하차장 장소 숙지를 통해 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 개선하겠습니다.	개선 예정
8	•접수일자 : 2019. 10. 6. •접수내용 : 익산문화재야행 행사 주차 및 기념품 관련 보완 요청	•임시주차장 홍보 및 행사장 주차 문제를 개선할 수 있도록 하겠으며, 이번과 같은 기념품 증정 관련 착오 사례가 없도록 노력하겠습니다.	개선 예정
9	•접수일자 : 2019. 10. 9. •접수내용 : 미륵산 정상 벤치보수 등	• 미륵산 정상부 노후벤치에 대해서는 현재 제작이 완료되었으나 현장여건상 제품 운반이 지연되는 상황이며 빠른시일 내에 설치하겠습니다. 미륵산 정상부는 미륵사지 문화재구역으로 지정되어 있어 수목 등을 식재하기 위해서는 문화재청의 허가를 득해야 하는 사항으로 즉시 시행하기는 어려운 상황이므로 이 점 양지하여 주시기 바라오며, 미륵산 입구(별장가든 옆) 탐방안내도는 관련부서와 협조하여 개선토록 하겠습니다.	벤치 보수 완료 / 관련 부서 협조요청

감사자료 과 요구사항

익산 역사문화도시 조성

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□
		고도육성계장		송석민	□
		세계유산계장		강숙자	□
		문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. ~ 2021.

◦ 사 업 비 : 5,304,000천원(국비 2,021,000 도비 787,000 시비2,496,000)

▸2019년 예산 : 1,070,000천원(국비 326,000 도비 147,000 시비 597,000)

◦ 사업내용

▸익산역사문화도시 지정을 위한 문화특화지역 조성 추진

▸백제왕도 핵심유적 보존관리사업 시행

▸역사고도 익산의 정체성 확립 학술회의 개최

▸마한 기초자료집 집성 및 학술조사 추진

□ 추진실적

◦ 백제왕도 핵심유적 보존관리사업 추진단 운영            : 2018. 1 ~ 2038. 1

▸구성인원 : 12명(문화재청5, 문체부1, 광역2, 기초4)

◦ 왕궁리유적전시관 ICT체험형 콘텐츠 구축               : 2019. 3.

◦ 익산역사문화 고문헌(금마지) 번역서 발간               : 2019. 4.

◦ 문화특화지역(문화도시)조성사업 추진(3개분야 11개사업)  : 2019. 1. ~ 12.

▸문화유산 예술소풍(2회), 백제왕도 예술실기대회(4회)

▸익산근대역사관 개관(2019. 3. 26.)

▸이리ㆍ익산 근현대 자료집 발간

(신문으로 본 이리ㆍ익산 사람들, 익산학 시민교재 도시와 사람들, 이야기로 듣는 이리와 익산)

▸역사이야기꾼 운영(2기/367명), 소곤소곤 백제캠핑(40가족/155명)

◦ 제2차 문화도시 지정 신청(역사전통분야 / 미선정)       : 2019. 1. ~ 12.

◦ 익산의 정체성 확립을 위한 학술회의 개최              : 2019. 9. 26.

▸주제 : 도성체계에서 본 백제왕도 익산의 관방유적

◦ 마한 실체 규명을 위한 시굴조사                       : 2019. 10. ~ 12.

▸망성면 무형리 말무덤(원형봉 토분) 매장문화재 1기

2. 세계유산 보존관리 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	세계유산계장		강숙자	□

□ 백제역사유적지구 유네스코 세계유산 등재현황

◦ 유 산 명 : 백제역사유적지구(Baekje Historic Areas)

◦ 대상유적 : 왕궁리유적, 미륵사지(지정일 : 2015. 7. 8.)

‣ 공주(2개소) 공산성, 송산리고분군

‣ 부여(4개소) 관북리유적과 부소산성, 정림사지, 능산리고분군, 나성

◦ 사업주체 : 전라북도, 충청남도, 익산시, 공주시, 부여군 / (재)백제세계유산센터

□ 사 업 개 요

◦ 대상유적 : 미륵사지, 왕궁리유적

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 964,000천원(국비 589  도비 112 시비 263)

◦ 사업내용 : 세계유산 국내외 교류활성화, 체계적인 보존관리, 확장등재

□ 추 진 실 적

◦ 국내외 세계유산 도시간 협력강화

‣한국세계유산도시협의회 참가(부여군 4.10/경주시 9.19/순천시 11.26)

‣제15차 세계유산도시기구 세계총회 참가(폴란드) : 6.1 ~ 6.6

‣韓中세계유산과 고도 교류협력 정책연구 연수(중국) : 11.12 ~ 11.16

◦ 세계유산 체계적인 보존관리사업

‣세계유산 수목전지사업(백제왕궁, 미륵사지)

‣세계유산 관람객 편의를 위한 음수대 설치

‣백제왕궁 관람객 무인계수기 설치(1대)

‣미륵사지 재난방지시스템 구축공사(소방 소화전11개소)

‣미륵사지 방재 IOT시스템 구축공사(CCTV6대, IOT카메라 등)

‣세계유산 관람환경개선 상시인력 배치

‣세계유산 모니터링 시스템 구축(앱 구축, 요원배치)

◦ 백제역사유적지구 세계유산 확장등재 추진

‣세계유산 확장등재 유적 연구 자료 집성(도록발간)

‣백제역사유적지구 학술포럼 개최(익산웨스턴호텔 7.19/200여명)

3. 세계유산 활용 홍보 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	세계유산계장		강숙자	□

□ 사 업 개 요

◦ 대상유적 : 미륵사지, 왕궁리유적

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 342,980천원(도비 23,000 시비 319,980)

◦ 사업내용 : 세계유산의 홍보 강화 및 세계유산 활용·홍보 프로그램 운영

□ 추 진 실 적

◦ 세계유산 국내외 홍보 강화

▸ 세계유산 홍보 전광판 광고 (익산역, 용산역)      : 2019. 1. ~ 12.

‣ 세계유산 홍보 책자 제작(미륵사지 전문가 해설서 등)

‣ 세계유산 홍보 기념품 제작(미륵사지석탑 크리스탈 외 2종)

‣ 스탬프 투어 운영(미륵사지 등 20개소)

◦ 세계유산의 다양한 활용 및 홍보사업 추진

▸ 문학인과 함께하는 백제역사문화탐방 운영(백제왕궁)    : 2019. 4. 12. ~ 4. 13.

▸ 세계유산 홍보부스 운영(미륵사지)                : 2019. 4. 27. ~ 5. 6.

▸ 미륵사지 석탑 보수정비 준공식(법회)             : 2019. 4. 30.

▸ 백제왕궁 한가위 소원등 날리기(3,000여명)         : 2019. 9. 12.

▸ 백제왕궁 토요상설 공연 운영(12회/1,010여명)      : 2019. 4. ∼ 11.

▸ 세계유산 백제왕궁 천년별밤캠프(6회/216명)      : 2019. 4. ∼ 12.

▸ 백제왕궁 바로 알기 직원 탐방 프로그램 추진      : 2019. 11. 21.

◦ 백제문화유산주간 운영	: 2019. 7. 8. ~ 7. 14.

▸ 백제문화유산 녹턴 개최(미륵사지/7.12)

4. 백제세계유산센터 연계사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	세계유산계장		강숙자	□

□ 사 업 개 요

◦ 대상유적 : 미륵사지, 왕궁리유적

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 430,000천원(국비215,000 도비64,500 시비150,500)

◦ 사업내용 : 백제세계유산센터 연계, 세계유산의 다양한 활용・홍보사업

□ 추 진 실 적

◦ 세계유산 연계 팸투어 실시(7회)              : 2019. 07. 03 ~ 07. 14

▸국내팸투어 5회 (여행작가, 언론인, 여행사 관계자 등)

▸국외팸투어 2회 실시 (세계유산 청소년 지도자, 해외 여행상품 개발자 등)

◦ 백제역사유적지구 일러스트 공모전 개최      : 2019. 03. 13 ~ 04. 29

▸활용방안 221건 접수 / 16점 시상

◦ 국내외사진 전시회 추진(3회)

▸수서역(SRT수서역 1층)                          : 2019. 07. 03 ~ 07. 14

▸일본(주일한국문화원 갤러리)                     : 2019. 07. 25 ~ 08. 20

▸베트남(주베트남한국문화원 갤러리)               : 2019. 11. 04 ~ 11. 16

◦ 백제문화주간 사진 콘테스트 및 홍보부스 운영  : 2019. 07. 08

◦ 백제역사유적지구 명사특강 영상 제작

▸백제역사유적지구 명사 특강(강사 : 최태성)       : 2019. 07. 14.

▸EBS 1TV 제작영상 송출                        : 2019. 11. 29.

◦ 백제역사유적지구 홍보용 광고영상 제작

▸KBS World 광고 편성(해외) :총 302회

▸KBS 1, 2 TV 스폿 송출 : 총 17회

◦ 세계유산 활용 방안 국제학술대회 개최(400명)  : 2019. 07. 19.

◦ 백제역사유적지구 교육교재 제작(4,000부)       : 2019. 12.

◦ 백제역사유적지구 항공영상 콘텐츠 제작(33지점)   : 2019. 12.

◦ 백제역사유적지구 통합모니터링 시스템 구축   : 2019. 12.

5. 익산 고도보존육성사업

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		송석민	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 금마면․왕궁면 일원 /3.1㎢(특별보존지구1.8 보존육성지구 1.3)

◦ 사업기간 : 2012. ~ 2025.

◦ 총사업비 : 341,850,000천원(국 189,250,000 도 62,535,000 시 62,535,000 기타 27,530,000)

※(고도보존 168,590,000천원 + 고도육성 170,660,000천원 + 주민참여 : 2,600,000천원)

▸고도육성사업 : 170,660,000천원(국 72,210,000  도 35,460,000  시 35,460,000  기타 27,530,000)

- 기투자 :  29,184,142천원(국 20,429,000  도  3,794,644  시  4,960,498)

- 2019년 :     756,429천원(국   529,500  도    68,079  시    158,850)

◦ 사업내용 : 고도이미지찾기사업, 고도 가로경관개선사업, 서동역사공원조성사업

객사터발굴을 위한 면사무소 이전부지 토지매입등

□ 추 진 실 적

◦ 고도 이미지 찾기사업(한옥, 담장) 추진	: 2015. ~  현재

▸한옥(52건), 담장(42건), 간판정비(8건) 완료

◦ 이주단지 고도 이미지 찾기사업(자체재원) 추진	: 2017. ~  현재

▸한옥(8건), 담장(5건) 완료

◦ 금마면사무소 이전사업(이후 객사,관아터 발굴)토지매입 추진	: 2017. ~ 2020.

▸면적 및 건수 : 총 9필지 2,559㎡중 4필지 1,511㎡ 완료/전북도수용재결신청(19.10.18)

◦ 서동 역사공원 조성사업 추진	: 2018. 4. ~

▸도시계획시설(공원)결정용역 및 토지보상계획 열람공고

◦ 금마 고도지구 간판정비사업 단계별 추진	: 2019. 1. ~ 12.

▸전선지중화 구간(금마길, 고도길)간판 정비완료   : 114개소

▸금마 터미널 주변 및 고도지구 경계 간판 정비완료 :  35개소

◦ 왕궁리 유적 주변 탑리마을 안길 경관사업 완료	: 2019. 1. ~ 4.

▸노후 담장 정비(L=226m) 및 안길포장(41.1a) 등

◦ 금마 옥룡천 인도교 설치(L=23m, 대장마을~서계마을) 완료	: 2019. 3. ~ 8.

◦ 금마 전선지중화 준공정산 추진(8개중 7개 완료)	: 2019. 5. ~

▸공가통신(6), KT 정산완료, 한전 정산중(2020. 하반기)

6. 문화유산 보존관리(정비) 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 총사업비 : 20개 사업 4,566,000천원(국비 2,601,300 도비 958,350  시비 1,006,350)

▸국가지정 : 쌍릉 정비 등 11개 사업 3,331,000천원

▸도  지정 : 여산 숲정이 순교성지 정비 등 7개 사업 835,000천원

▸기    타 : 숭림사 보광전 재난방지시설 구축 등 2개 사업 400,000천원

□ 추 진 실 적

◦ 정비사업 설계용역 등 추진	: 2019. 1. ~ 4.

◦ 문화재청 및 전북도 설계승인	: 2019. 4. ~ 5.

◦ 정비사업 추진	: 2019. 5. ~ 12.

▸완료 13건, 시행중 7건

◦ 정비사업 완료	: 2019. 12.

(단위 : 건)

구 분	건수	내 용
계	20
사업완료	13	‣ 국가지정 및 등록문화재(4) : 연동리 석조여래좌상, 나바위성당(화장실 및 강당권역 정비), 춘포리 구 일본인 농장 가옥, 입점리 고분, ‣ 도지정 문화재(7) : 모현동 부도, 성당면 은행나무 외 3개소, 이병기선생생가, 여산 숲정이 순교성지, 심곡사 대웅전, 숭림사 보광전 목조석가여래좌상, 태봉사 삼존석불 ‣ 재난방지시설 구축(2) : 숭림사 보광전, 나바위성당
시행중	7	‣ 국가지정 및 등록문화재(7) : 쌍릉, 토성, 연안이씨종중문적, 나바위성당(지중화공사), 관음사 목조보살입상, 심곡사 칠층석탑 출토 유물, 충간공보물 제651호 박물관

□ 문화재 보수정비 사업

(단위 : 백만원)

구분	문 화 재 명 (사업명)	사 업 내 용	사업비	비 고
				설계중	설계승인	공사중	완 료
계	20개 사업		4,566	5	1	1	13
국 가 지 정 문 화 재 및 등록문화재	11개 사업		3,331	5	1	1	4
	익산 쌍릉 정비	종합정비계획 수립 발굴지 유적정비 소왕릉 발굴조사	857	○
	익산 토성 정비	종합정비계획 수립 발굴지 정비	600	○
	연안이씨 종중문적 보존처리	보존처리(18점) 및 보관함 제작	130			○
	익산 연동리 석조여래좌상 불단정비	불단정비 설계용역	43				○
	익산 나바위 성당 정비	강당 및 사무권역 정비 탐방로 정비 설계용역	430				○
	나바위 성당 미관개선	전선 및 배관 지중화	35	○
	익산 춘포리 구 일본인 농장가옥 정비	내부 보수정비	20				○
	익산 입점리 고분 정비	탐방로 정비	200				○
	익산 관음사 목조보살입상	보호각 건립	900	○
	심곡사 칠층석탑 출토유물	수장고 건립 설계	100	○
	연안이씨 종중문적 주변정비	육각정 보수설계	16		○
도지정문화재	7개 사업		835				7
	모현동 부도 정비	보수정비 및 보존처리	30				○
	성당면 은행나무 외 3개소 방제	방제용역 및 유지관리	5				○
	이병기선생생가 보수 및 정밀실측조사	지붕해체보수 정밀실측조사	200				○
	여산 숲정이 순교성지 정비	성토부지 정비	440				○
	심곡사 대웅전 주변정비	배수로 석축보수	50				○
	숭림사 보광전 목조석가여래좌상 주변정비	종각 보수	70				○
	태봉사 삼존석불 주변정비	석축 보수	40				○
재난방지	2개 사업		400				2
	숭림사 보광전 재난방지시설 구축	소방시설 개선	200				○
	나바위성당 재난방지시설구축	노후 CCTV 개선	200				○

7. 백제왕궁(왕궁리유적) 보수정비 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박 성 일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30번지 일원

◦ 사업기간 : 2007. ~ 2022.

◦ 사 업 비 : 47,713,000천원 (국비 33,399,000 도비 7,157,000 시비 7,157,000)

▸ 2019년 : 3,871,428천원 (국비 2,430,000 도비 720,714 시비 720,714)

◦ 사업내용

▸ 2012년 이전 : 발굴지(건물지) 정비, 종합정비계획 수립 등

▸ 2013년 이후 : 종합정비계획에 따라 발굴지 순차 정비

▸ 발굴조사 및 복원고증연구 지속추진

익산 왕궁리유적 종합정비계획 (2012년 수립)

총사업비 199억원(국비 139억원, 지방비 60억원)

1단계(단기, 2013∼2018년) : 103억원	2단계(중기, 2018∼2022년) : 96억원
▸토지매입 및 원형 규명을 위한 발굴조사 ▸궁궐담장 및 문지 복원 정비 (동,서,남,북) ▸공방영역 및 정원유적 정비(후원 포함) ▸문화재구역 확대 및 토지매입 등	▸정원유적 및 후원영역 정비 ▸왕궁리 유적 조경공사 및 지중화 사업 ▸편익시설 정비 (주차장, 탐방로 및 광장, 배수시설 등) ▸주변 조경, 편의시설 (화장실, 휴게 ․안내소)

□ 추 진 실 적

◦ 발굴지 토지매입 및 발굴                       : 1989 ~ 현재

◦ 왕궁리 유적전시관 건립                        : 2002 ~ 2007

◦ 발굴 진행 및 완료지역 단계별 유적 정비 중     : 2007 ~ 현재

□ 2019년 정비현황

◦ 유적지 정비사업 : 유적 정비 및 후원 조경식재, 북측 관리센터(주차장) 설계

▸ 사업비 : 2,171,428천원 (국1,520,000 도325,714 시325,714)

▸ 세부 추진실적

- 2019년 정비공사                           : 2019. 12. ~ 2020. 10.

- 북측 관리센터(주차장) 설계용역              : 2019.  2. ~ 2020. 2.

- 문화재 안내판 교체                        : 2019. 10. ~ 2020. 1.

◦ 왕궁리유적 전시관 개보수 설계 : 700,000천원(국210,000 도245,000 시245,000)

▸ 건물면적 : 4,354㎡/1,319평(기존 : 2,350㎡/712평, 증축 2,004㎡/607평)

▸ 설계용역                                    : 2019.  6. ~ 2020. 3.

◦ 발굴조사 및 복원고증연구시행 : 1,000,000천원(국700,000 도150,000 시150,000)

▸ 복원고증연구/발굴조사 공기관 대행사업       : 2018. 1. ~ 2020. 12.

8. 미륵사지 보수정비 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 금마면 기양리 97번지 일원

◦ 사업기간 : 2008. ~ 2038.

◦ 사 업 비 : 210,258,000천원 (국비 147,181,000 도비 31,538,000 시비 31,539,000)

▸ 2019년 : 4,441,429천원 (국비 3,109,000 도비 666,214 시비 666,215)

◦ 사업내용 : 목탑, 금당, 강당, 회랑 등 주요 건물 복원 등

< 연도별 추진계획 >                       (단위 : 백만원)

구분	연도별	사업내용	사업비	비고
합계			210,258
1 단계 (2018년 ∼ 2021년)	소 계		25,000	심화연구 : 2,500 복원정비 : 22,500
	2018년	․ 미륵사 복원 심화연구 (계속) ․ 배수시설, 기단부 복원․정비 (계속) ․ 미륵사지 회랑지 복원 설계	3,260	심화연구 : 500 복원정비 : 2,760
	2019년	․ 미륵사 복원 심화연구 (계속) ․ 미륵사지 금당, 강당 복원 설계 (계속) ․ 회랑 복원공사 추진	4,441	심화연구 : 100 복원정비 : 4,341
	2020년	․ 미륵사 복원 심화연구 (계속) ․ 미륵사지 복원 설계 (계속) ․ 회랑, 중문, 금당, 강당 복원공사 (계속)	5,650	심화연구 : 1,300 복원정비 : 4,350
	2021년	․ 미륵사 복원 심화연구 ․ 목탑, 강당, 승방 등 복원 설계 (계속) ․ 회랑, 중문 복원공사 (계속)	11,649	심화연구 : 600 복원정비 : 11,049
2 단계 (2022∼2038년)		․ 목탑, 금당, 강당 등 주요건물 복원 추진 (건물의 전체적인 복원은 변경 될 수 있음)	185,258	복원정비

□ 2019년 정비현황

◦ 정비사업 : 가마터 보호각 개보수 설계, 광장 전면부 정비 등

▸ 사업비 : 4,271,429천원(국2,990,000 도640,714 시640,715)

▸ 세부 추진실적

- 가마터 보호각 개보수 설계	: 2019. 2. ~ 2020. 4.

- 건물지 기단부 정비	: 2019. 2. ~ 2020. 10.

- 광장 전면부 정비	: 2019. 6. ~ 2020. 2.

- 전기·가로등 시설 설치	: 2019. 11. ~ 2020. 4.

- 탐방로 정비 및 약수터 화장실 보수	: 2019. 1. ~ 12.

◦ 미륵사지 당간지주 보존처리 : 70,000천원(국49,000 도10,500 시10,500)

◦ 복원정비연구(5차) 2차 지급 : 100,000천원(국70,000 도15,000 시15,000) / 공기관대행사업

9. 문화재 활용사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	세계유산계장		강숙자	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 731,396천원(국비 214,676 도비 116,424 시비 400,296)

◦ 사업내용 : 문화재활용 향유․체험사업, 문화재청 공모사업 등

□ 추 진 실 적

◦ 다양한 문화재활용 콘텐츠 개발 및 프로그램 운영

▸ 문화재 야행(夜行) 사업(백제왕궁/2회/37,000여명)         : 2019. 1. ∼ 12.

- 백제왕궁 야간문화재 체험, 향유 및 주민참여형 프로그램

※ 2019 문화재야행 우수사업 선정(문화재청)

▸ 생생 문화재 사업(익산쌍릉 외/8회/291명)               : 2019. 1. ∼ 12.

- 쌍릉, 미륵사지 등을 활용한 교육, 공연, 체험 놀이 프로그램

▸ 향교․서원 문화재 활용사업(함열향교/22회/710명)        : 2019. 1. ∼ 12.

- 함열향교를 활용한 전통문화 체험 및 교육 프로그램

◦ 무형문화재 향유프로그램 지속 운영 및 활성화               : 2019. 1. ∼ 12.

▸ 무형문화재 상설공연 및 공개행사 추진(단체 5 / 개인 3)

▸ 무형문화재 전수교육 육성(4개단체/18개 종목/280명)

▸ 대한민국 농악축제(2019. 5. 25. / 보석박물관)

◦ 2020년 문화재청 공모사업 선정(7건/1,475백만원)              : 2019. 9. ~ 12.

▸ 지역문화재 활용 사업3건 (문화재 야행사업, 생생문화재 활용사업, 향교․서원 활용사업)

▸ 국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업

▸ 세계유산 홍보 지원사업(백제역사유적지구)

▸ 세계유산 활용 프로그램 사업(백제역사유적지구)

▸ 지역문화유산 교육사업

10. 국립익산박물관 건립 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 금마면 기양리 104-1

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2021.(국립익산박물관 건립후 사회교육관 개축)

◦ 사업규모 : 부지면적 39,695㎡, 건축연면적 10,000㎡(건립 7,500㎡, 개축 2,500㎡)

◦ 총사업비 : 37,200,000천원

(전시관 건립 28,500,000 사회교육관 개축 8,700,000)

□ 추진현황

◦ 국립익산박물관

▸ 국립익산박물관 건설공사 기본계획 수립        : 2015. 2. ~ 6.

▸ 국립익산박물관 총사업비 확정(415억원)         : 2015. 10.

▸ 미륵사지 유물전시관 국립 승격                : 2015. 12.

▸ 국립익산박물관 건립 기본설계                 : 2016. 6. ~ 2017. 4.

▸ 국립익산박물관 건립 실시설계 완료            : 2017. 7.

▸ 국립익산박물관 건립 착공                     : 2017. 9.

▸ 국립익산박물관 건립 및 개관                  : 2019. 12. ~ 2020. 1.

◦ 사회교육관

▸ 사회교육관 설계용역 발주                      : 2019. 1.

▸ 사회교육관 설계용역 계약자 선정 및 착수       : 2019. 3.

▸ 사회교육관 설계 추진                          : 2019. 10. ~ 12.

▸ 사회교육관 개관                               : 2021. 12.

11. 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 왕궁면 왕궁리 562번지 일원

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2021.

◦ 사 업 비 : 10,000,000천원 (국비 3,000,000 도비 3,500,000 시비 3,500,000)

▸ 2019년 :  700,000천원(국  210,000 도 245,000 시 245,000) / 설계비

▸ 2020년 : 5,366,667천원(국1,610,000 도1,878,334 시1,878,333) / 공사비

◦ 사업내용 : 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성

▸ 전시공간 확대 및 수장기능보강, 가상체험관(AR, VR, 홀로그램 등) 설치

▸ 건물면적 : 4,354㎡/1,319평(기존 : 2,350㎡/712평, 증축 : 2,004㎡/1,607평)

□ 추진실적

◦ 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성 설계용역비 확보(700백만원)   : 2019. 1.

◦ 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성 설계용역 제안평가 및 업체선정 : 2019. 5.

◦ 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 설계용역 착수	: 2019. 6.

◦ 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 기본계획안 문화재위원회 심의완료   : 2019. 11.

◦ 2020년 세계유산 보존관리사업 예산확보(5,367백만원)      : 2019. 12.

◦ 백제왕궁 역사관 증축 및 가상체험관 건립 공사추진      : 2020. ~ 2021.

◦ 백제왕궁 역사관 증축 및 가상체험관 개관(예정)          : 2022. 1.

12. 국가무형문화재통합전수교육관 운영 및 관리현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		전 형 수	□

□ 시 설 개 요

◦ 위    치 : 익산대로21길 1-9 (김동문 배드민턴장 인접)

◦ 개 관 일 : 2016. 9. 22. (준공일 2016. 8. 10.)

◦ 규    모 : 연면적 3,919.45㎡ (지상2층 지하1층)

◦ 주요시설 : 실내공연장, 다목적 소공연장, 세미나실, 사무실 등

□ 입주단체 현황

단 체 명	지 정 구 분	지 정 현 황	회 원 수
이 리 농 악	국가무형문화재 제11-3호 (‘85. 12. 1)	보유단체 1 / 전수조교 3 (이수자 60명)	130여명 (회장 김익주)
이리향제줄풍류	국가무형문화재 제83-2호 (‘85. 9. 1)	보유단체 1 / 전수조교 2 (이수자 15명)	75여명 (회장:오석신)
시립풍물단		시립(상임)	15명

□ 운 영 실 적

◦ 무형문화재 전수 프로그램 운영

단 체 명	전수교육관 활성화사업	전수교육 육성사업	비고
이리농악	사회교육(주1회)	판굿 등 7개과정
이리향제줄풍류	사회교육(주1회), 상설공연(6회)	가야금 등 5개과정

◦ 주요시설 대관 현황                                 (건수/참여인원)

구 분	이용현황
	계	무 료	유 료	사용료
총 계	144 / 7,334	129 / 5,909	15 / 1,425	1,195,000원
세미나실	85 / 2,204	85 / 2,204	-	-
다목적 소공연장	5 / 184	5 / 184	-	-
실내공연장	54 / 4,946	39 / 3,521	15 / 1,425	1,195,000원