2020.  5.

제226회 익산시의회(제1차 정례회)

2020행정사무감사자료

	건 설 국

건  설  과

□			감사자료 과 공통사항
			1.	2019년도 업무성과 및 반성	137
			2.	2019년도 예산집행 및 추진사항	138
			3.	2019년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과	141
			4.	2019년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과	145
			5.	시정질문에 대한 조치 결과	146
			6.	주요사업 조서(3천만원 이상)	150
			7.	2019년도 각종 민원(진정․건의․청원 등) 접수 처리내역	154
			8.	기금 운용 현황	155
			9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	155
			10.	용역사업 현황	156
			11.	인･허가 민원관련	160
			12.	각종공사 설계 변경상황	160
			13.	건설공사 집행 현황(3천만원이상)	162
			14.	민간에 대한 보조금 집행 내역	162
			15.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)	163
			16.	2019년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역	164
			17.	2019년 예산 중 2020년 명시 및 사고이월 내역	166
			18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황	168
			19.	공사 준공기한 연장 내역	168
			20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	169
			21.	국․도비 반납 현황(2019년 반납건)	169
			22.	2019년도 계획사업중 미착공사업 현황	170
			23.	2019년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황	170
			24.	2019년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업	170
			25.	2019년도 예산편성후 전액 미집행 내역	171
			26.	소송 사건 현황	171
			27.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황	172

□			감사자료 과 요구사항
			1	2019년도시군도및농촌도로 확·포장사업		175
				-진행중인 시군도 및 농촌도로 현황(이월및계속사업)		175
				-2019년도 예산 미확보사업(이월및계속사업)		176
				-2019년도 신규사업 현황		177
				-2019년도 준공된 사업현황		177
			2.	군도23호선 도로확·포장사업		178
			3.	평화육교 재가설사업		179
			4.	왕궁천 하천 정비사업		180
			5.	동명천 하천 정비사업		181
			6.	소하천 정비사업(대판천,동산천,닭작골천)		182
			7.	만경강 문화관 조성사업		183
			8.	국가하천 유지관리사업		184
			9.	하천제방유지보수		185
			10.	도로조명 조도개선		186
			11.	도로조명 고장민원 처리내역		187

감사자료 과 공통사항

1. 2019 업무성과 및 반성

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

□ 성    과

◦ 평화육교 재가설로 호남선 KTX 완전개통과 안전한 교통망구축

▸ 미매입토지 재감정평가 및 보상협의	: 2019.  1. ~ 12.

▸ 대체우회도로(4차선) 운영	: 2019.  1. ~ 12.

▸ 평화육교 재가설공사 추진	: 2019.  1. ~ 12.

※ 공사 공정율 – 53%(2019. 12월말 기준)

◦ 농어촌도로 확포장 및 도로구조개선으로 차량통행 불편해소 및 농촌지역
경제활성화 기반시설 구축 (3개사업 준공)

▸농어촌도로 도로구조개선사업 완료 : 2개소

- 용동 삼정~두무간 도로확포장

· 도로확포장 L=1.21㎞, B=8.0m, 준공 및 개통	: 2019.  3. 26.

- 용동 흥왕마을 진입로 확포장

· 도로확포장 L=0.3㎞, B=6.0m, 준공 및 개통	: 2019.  7. 18.

▸주요사거리 회전교차로 설치 : 1개소

- 삼기산사거리 회전교차로 도로구조개선공사

· 회전교차로 1식, 회전교차로 설치 준공 및 개통	: 2019. 11. 14.

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 환경 친화적 하천 정비로 재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸대판천 소하천정비사업 공사 완료	: 2019. 8. 29. 준공

▸왕궁천 하천환경정비사업 공사 추진	: 2019. 3. 11. 착공(공사중-25%)

▸동산천 소하천정비사업 공사 추진	: 2019. 12. 착공(공사중-30%)

□ 반     성

◦ 평화육교 개통기간이 당초보다 14개월 연장으로 인한 인근주민들의 영업보상등의 민원이 발생 공기단축방안등에 대하여 주민과 협의 상생방안 마련 민원해결에 총력

2. 2019년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

【 2019. 12. 31.현재 】														(단위 : 천원, %)
부서	정책		단위		세 부 사 업		예 산 현 액					집행액			잔 액	비율	비고
							계		2019 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액
건설과							51,605,326		31,250,557	13,975,080	6,379,689	25,373,160			26,232,166	49.2
	도로시설관리						27,162,359		16,841,677	6,865,276	3,455,406	13,431,936			13,730,423	49.5
			시군농어촌도로확포장				20,180,235		10,985,000	5,739,829	3,455,406	7,581,272			12,598,963	37.6
					금마갈산~서편간 도로확포장공사		500,000		500,000	0	0	43,835			456,165	8.8
					용동삼정~두무간 도로확포장공사		475,954		0	0	475,954	460,723			15,231	96.8	사고 15,231
					망성신성~관산간 도로확포장공사		775,241		392,000	262,414	120,827	358,165			417,076	46.2	명시 90,075
					오산장신~만석간 도로확포장공사		56,140		50,000	6,140	0	52,162			3,978	92.9
					왕궁온수~시대간(황암~상발)도로확포장공사		309,496		0	309,496	0	25,102			284,394	8.1	명시 284,394
					춘포토다리~덕동간 도로확포장공사		703,911		450,000	253,911	0	2,649			701,262	0.4	명시 251,262
					미물용지매입비 (시군도농어촌도로)		115,000		115,000	0	0	94,461			20,539	82.1
					왕궁군도26호선(리도210호) 도로확포장공사		220,000		220,000	0	0	6,368			213,632	2.9
					용안창리법성간 도로확포장공사		1,117,974		490,000	467,398	160,576	501,056			616,918	44.8	명시 139,259
					함라칠성~다운간 도로확포장공사		879,637		426,000	453,637	0	680,795			198,842	77.4	명시 34,112
					망성군도10호금지간 도로확포장공사		722,187		375,000	347,187	0	362,565			359,622	50.2	명시 20,275
					금마누동~신촌간 도로확포장공사		529,559		180,000	290,652	58,907	210,150			319,409	39.7	명시 139,409
					시군농어촌도로 확포장사업		17,000		17,000	0	0		11,402		5,598	67.1
					군도23호선 도로확포장공사		7,610,145		2,980,000	1,991,003	2,639,142		2,698,432		4,911,713	35.5	멍시 1,896,668 사고 108,825
					오산외용(외검선) 도로확포장공사		10,731		0	10,731	0		0		10,731	0.0	명시 10,731
					시군도 도로관리계획 및 농어촌도로기본계획용역		160,000		160,000	0	0		42,080	117,920		26.3
					용동흥왕마을 진입로 확포장공사		283,162		0	283,162	0		276,110	7,052		97.5	명시 7,052
					어양동어곳~부평간 도로확포장공사		873,211		500,000	373,211	0		802,080	71,131		91.9	명시 5,374
					오산면소재지진입도로 (군도2호)확포장공사		600,000		500,000	100,000	0		74,330	525,670		12.4	명시 25,669
					오산제일교회~정각사간 (리도203호)도로확포장공사		690,887		500,000	190,887	0		291,114	399,773		42.1	명시 59,806
					황동도선~외화간(면도104호)도로확포장공사		400,000		300,000	100,000	0		65,800	334,200		16.5	명시 34,200
					오산역~상아마을간(리도203호) 병목구간도로확포장공사		200,000		200,000	0	0		17,840	182,160		8.9
					하나로~소간촌간(리도203호) 도로확포장공사		600,000		500,000	100,000	0		32,992	567,008		5.5	명시 67,028
					왕궁양동마을진입도로 (리도207호)확포장공사		700,000		600,000	100,000	0		347,044	352,956		49.6	명시 29,848
					춘포창평마을진입도로 (농도308호)확포장공사		100,000		100,000	0	0		0	100,000		0.0
					왕궁금오동~군도22호간도로 (면도102호)확포장공사		300,000		300,000	0	0		40,402	259,598		13.5
					금마신정~증왕간도로 (리도202호)확포장공사		600,000		500,000	100,000	0		64,423	535,577		10.7	명시 35,577
					춘포오룡선도로확포장공사		130,000		130,000	0	0		19,192	110,808		14.7
					황등면하동마을~동연지하차도 우회도로개설공사		500,000		500,000	0	0		0	500,000		0.0
			교통관리 개선사업				1,110,000		410,000	700,000	0		337,401	772,599		30.4
					용안난포사거리 위험도로구조개선		700,000		0	700,000	0		20,325	679,675		2.9	명시 679,674
					회전교차로설치 (삼기산사거리)		330,000		330,000	0	0		317,076	12,924		96.0
					왕궁신호~용남 위험도로구조개선		80,000		80,000	0	0		0	80,000		0
			철도건널목개량사업				2,925,447		2,500,000	425,447	0		2,620,319	305,128		89.6
					평화육교재가설		2,925,447		2,500,000	425,447	0		2,620,319	305,128		89.6	명시 305,127
			도로조명시설관리				2,907,717		2,907,717	0	0		2,854,677	53,040		98.2
					보안등신규설치		414,000		414,000	0	0		397,720	16,280		96.1
					노후가로등정비		748,100		748,100	0	0		727,492	20,608		97.3
					가로등·보안등유지관리		1,619,859		1,619,859	0	0		1,605,789	14,070		99.1
					가로등 보수차량 운영 유지비		121,258		121,258	0	0		119,521		1,737	98.6
					보안등신규설치 (보조)		4,500		4,500	0	0		4,155		345	92.3
			주민숙원사업				38,960		38,960	0	0		38,267		693	98.2
					주민숙원사업		38,960		38,960	0	0		38,267		693	98.2
	하 천 정 비						24,300,334		14,266,247	7,109,804	2,924,283		11,802,564		12,497,770	48.6
			하천정비 및 유지관리				24,300,334		14,266,247	7,109,804	2,924,283		11,802,564		12,497,770	48.6
					하천제방유지보수		627,073		296,000	5,897	325,176		516,765		110,308	82.4	사고 18,157
					하천제방유지보수(자체)		1,700,032		1,640,467	41,892	17,673		690,096		1,009,937	40.6	사고 17,673
					소하천정비(생활)		2,044,459			990,545	1,053,914		1,540,356		504,103	75.3	명시 499,709 사고 4,394
				국가하천유지보수 (4대강)			341,000		341,000				339,881		1,119	99.7
				왕궁천하천정비사업			15,389,197		10,817,280	4,571,917 (계속비)			6,760,384		8,628,813	43.9	계속비 3,783,936
				동면천하천정비사업			1,542,654		200,000	1,342,654 (계속비)			486,694		1,055,960	31.6	계속비 857,560
				만경강물문화관 진입도로개설공사			1,350,000		50,000		1,300,000		673,495		676,505	49.9	사고 626,504
				국가하천유지관리 (4대강외)			160,000		160,000				156,607		3,393	97.9
				하천관리및유지관리 (해지천)			227,519				227,519		227,501		18	99.9	사고 18
				하천정비 (동산천)			542,899		386,000	156,899			305,101		237,798	56.2
				소하천정비 (닭작골천)			372,000		372,000				102,587		269,413	27.6
				하천공사프로그램 (CAD)구입			3,500		3,500				3,097		403	88.4
	재무활동(보전지출)						71,591		71,591				71,177		414	99.4
				국고보조반환금			71,591		71,591				71,177		414	99.4
	행정운영경비						71,042		71,042				67,483		3,559	94.9
				인력운영비			40,000		40,000				40,000		0	100
				기본경비			31,042		31,042				27,483		3,559	88.5

3. 2019년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

연번	시정․개선사항	조치(처리) 결과	비고
1	▸예산 집행 실적이 저조하며 이월예산이 많은 바, 예산편성 및 운용시 유의하여주기 바람.	▸공사추진에 따른 실시설계 등 행정절차이행으로 예산집행이 지연, 최대한 예산이 조기에 집행될 수 있도록 적극 노력하겠음
2	▸소하천 정비사업은 추진되는 데에 반해 소하천관리위원회는 운영되지 않아 효율적으로 운영 될 수 있는 활성화 방안을 검토하기 바람.	▸소하천관리위원회는 소하천기본계획수립 및 변경, 소하천구역 폐지 등 소하천관리에 대한 사항을 심의하며 ▸소하천 정비공사 등 일반적인 사항은 사전 설계검토 (전북도)를 거쳐 시행하고 있음
3	▸공사추진시 설계변경이 많이 발생되고 있는바 추후현장확인 등을 철저히 하여 설계변경이 발생되지 않도록 노력하기 바람.	▸ 공사 중 민원발생, 현장여건 변화 및 장기공사로 인한 관급자재대의 상승 등으로 인한 설계변경사항으로 금후 공사 추진 시 설계변경이 최소화 될 수 있도록 하겠음
4	▸고장나고 노후된 가로등, 보안등에 대하여 야간통행불편 해소 및 안전사고 예방을 위하여 민원접수 사항 뿐만아니라 일제전수조사를 실시하여 사전에 교체 및 보수가 될 수 있도록 노력하기 바람.	▸도심지역에 도로변에 설치된 가로등은 주 2회 이상 차량으로 야간순찰을 실시 경미한 사항에 대하여는 현장조치를 하고 기타 야간작업이 불가한 고장개소는 익일 보수로 민원을 해소하고 있으며, 29개읍면동 골목길 및 마을안길에 설치된 보안등에 대하여는 지역이 광범위하고 고장예측이 불가 및 순찰활동이 어려운바 통·리장 및 주민의 신고에 의존하고 있는 실정으로 고장 민원접수시 신속히 보수하여 안전사고 예방 및 주민의 야간통행에 불편함이 없도록 노력하겠음.
5	▸만경강문화관 조성사업의 조속한 추진을 위하여 토지보상협의가 이루어 질 수 있도록 노력하기 바람. ▸만경강 문화관은 많은 예산이 투입되는 만큼 익산시에서 주도적인 역할을 통하여 익산시를 대표하는 문화관이 될 수 있도록 노력하여 주시기 바람.	▸소유자와 보상 협의 노력하였으나, 협의에 어려움이 있어 중앙토지수용위원회의 수용재결결정 후 수용(20.3.16.)완료 됨 ▸2018. 12. 17. 구성된 만경강유역 협의회(전주시,군산시,익산시,김제시,완주군,익산지방국토관리청)를 통하여 만경강문화관에 대한 전반적인 사항을 협의하고 있기 때문에, 만경강유역 실무위원회 및 협의회 개최시 익산시의 의견이 적극적으로 반영될 수 있도록 노력하겠음.
6	▸왕궁천 및 동면천 하천환경 정비사업 추진시 교량위치 및 폭 등 주민의견을 수렴하여 사업이 추진될수 있도록 노력하기 바람.	▸왕궁천 - 왕궁천 하천정비사업에 대하여 주민 설명회를 2회 개최하여 교량 위치 및 폭 등에 대한 주민의견을 수렴하여 실시설계를 작성하였음. (1차 2016.4.15./ 2차 2017.10.19.) ▸동면천 - 동면천 하천정비사업에 대하여주민설명회를 2회개최하여 교량 위치 및 폭 등에 대한 주민의견을 수렴하여 실시설계를 작성하였음. (1차 2018.4.10./ 2차 2018.10.4.)
7	▸현재 지방하천, 소하천 등 정비되지 않은 하천에 교량이 설치되어 있으나 영농을 위해서는 너무 먼 거리를 돌아와야 하는 어려움이 있는 민원에 대해서는 우선 시비로 교량가설을 검토하기 바람.	▸교량신설은 하천기본계획에 따라 하폭확장, 제방고 상승 등 하천의 전반적인 개수계획을 고려하여 검토하여야 하고 ▸현황(하폭, 제방고 등)을 기준으로 설치할 수 없는 시설로써 ▸하천정비 우선순위에 따라 하천정비공사와 병행하여 설치하여야 함.
8	▸평화육교 재가설 사업사업이 원활하게 조기에 완료 될 수 있도록 시에서 많은 협조 바라며, 지도감독도 철저히 하기 바람.	▸철도시설공사와 지속적인 업무협의를 통하여 평화육교 재가설공사가 순조롭게 진행될 수 있도록 적극 노력하겠음
9	▸금마저수지 옆 도로는 대형화물차들이 많이 다니는 곳으로 현재 인도가 없어 인명사고의 위험이 많으므로 부대와 협의하여 인도가 개설될 수 있도록 조치하여 주기 바람.	▸농어촌도로 금마면도 201호로 2000년도에 준공완료 된 사항으로 도로 유지관리부서인 도로과에서 차량통행 및 보행자 안전등에 대하여 종합적으로 판단하여 인도개설에 대하여 검토하여야 할 사항임
10	▸춘포면 만경강 내에 설치되어 있는 축구장 보수 후 잔디가 고사하고 있어 재보수 요청	▸18년 7월 축구장 평탄화 작업을 위한 마사토 보수공사 시행 후 잔디가 올라오고 있는 상황으로 조금 더 지켜본 후 잔디가 올라 오지 않으면 잔디 보수공사 검토하겠음

4. 2019년도 상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□

연번	공 사 명	지적사항	조치 (처리) 결과	수감기관	비고
1	여산 신리~ 호월간 도로 확포장공사 외8건	순환골재 의무사용량 미사용 및 사용계획서 미제출	- 공사완료에 따른 조치 불가(여산 신리~호월간, 성당 삼회선, 오산 장신~만석간, 용동 삼정~두무간) - 순환골재 사용계획서 제출 (군도23호선, 금마 누동~신촌간, 함라 칠성~다은간, 망성 군도10호~금지간) - 설계 반영 계획 (금마 누동~신촌간)	행정안전부	조치 완결
2	여산 신리~ 호월간 도로 확포장공사 외 3건	산업안전 보건관리비 목적 외 사용	-안전관리비 환수액 징수 완료 (여산 신리~호월간, 성당 삼회선, 신평천, 외산천 소하천정비공사)	행정안전부	조치완결
3	왕궁천 하천정비공사	교량 설계증급 적용 부적정	-장기계속공사로 인한 조치대상(발산교, 흥암교) 향후 설계변경으로 조치 예정	행정안전부	미결

5. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

【관리번호 : 221 - 2 - 1】

일 시	2019. 12. 19. (제221회 제2차정례회)	질문의원	김충영	답 변	시장
		설명일자	2019.12.20.
제 목	평화육교 재가설 우회도로 존치 필요			소관부서	건 설 과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 평화육교 재가설사업 완료 후에도 현재 우회도로 존치 필요
▣ 답 변 내 용 ◦ 평화육교 재가설공사의 원활한 사업 추진을 위하여 개설한 대체우회도로 편입부지는 현재 임대하여 사용하고 있으며, ◦ 우회도로 존치를 위하여는 임대·사용중인 부지의 보상이 우선적으로 선행되어야 하므로 토지소유자 및 지역주민의 의견을 반영하여 긍정적으로 검토하겠음. ▣ 금 후 계 획 ◦ 토지소유자 및 지역주민 의견 수렴 : 2021. 3. ~ 5. ◦ 편입토지 감정평가 및 보상 추진 : 2021. 6. ~ 8. ◦ 평화육교 재가설사업 준공 : 2021. 9.

【관리번호 : 221 - 3 - 2】

일 시	2019. 12. 19. (제221회 제2차정례회)	질문의원	한동연	답 변	시장
		설명일자	2019.12.20.
제 목	건설국에서 추진하는 사업 중 중단된 사업에 대하여			소관부서	건 설 과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 건설국에서 추진하는 사업 중 중단된 사업들의 조속한 추진 ▸2004년부터 완공되지 못하고 진행중인 사업 건수 및 사업비 ▸2019년, 2020년 신규사업 건수 및 사업비
▣ 답 변 내 용 ◦ 국고로 지원되던 양여금이 2004년 중단되면서 사업기간 내 완공되지 못하고 현재까지 진행중인 사업은 총 21건, 총사업비 41,479백만원임. ◦ 또한, 현재 예산편성은 기존사업 마무리 위주로 편성하고 있으며, 19년 시·군·농어촌도로 확포장 신규사업 6개소는 추진중에 있으며, 2020년 신규사업은 1건 약 700백만원이 소요될 것으로 예상됨. ▣ 금 후 계 획 ◦ 사업할 곳은 많고 예산은 한정되어 있어 예산편성에 많은 어려움이 있으며, 향후 예산편성시 추진중인 사업이 우선 마무리된 후, 신규사업비가 편성될 수 있도록 예산편성에 신중을 기하겠음.

【관리번호 : 221 - 3 - 4】

일 시	2019. 12. 19. (제221회 제2차정례회)	질문의원	한동연	답 변	시장
		설명일자	2019.12.20.
제 목	예산편성에 대하여			소관부서	건 설 과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 사업계획 수립시 정확한 사업비 산정으로 예산 편성 필요
▣ 답 변 내 용 ◦ 당초 개략설계비로 사업비를 산정하였으나, 설계 및 공사추진 시 현장여건 반영 및 감정평가 가격결정에 따른 보상비 산정으로 총사업비가 불가피하게 변동되었음. ▣ 금 후 계 획 ◦ 현재 추진중인 익산시 도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본·정비계획 재수립용역 수립시 정확한 사업비가 산정되어 사업이 원활히 추진될 수 있도록 노력하겠음.

【관리번호 : 221 - 5 - 10 】

일 시	2019. 12. 19. (제221회 제2차정례회)	질문의원	임형택	답 변	시장
		설명일자	19.12.17.
제 목	친수공간 조성			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 황등호 ～ 원광대 ～ 미륵사지 일대를 탑천 하천정비사업을 통해 수변공간 조성
▣ 답 변 내 용 ◦ 현재 익산지방국토관리청에서 탑천 하천기본계획을 포함한 만경강 하류권역 하천기본계획을 수립중이며 2020년 상반기 중 해당 용역이 완료되면 추후 탑천 하천정비사업을 통해 수변공간을 조성하겠음 ▣ 금 후 계 획 ◦ 2020년 균특회계 지방이양으로 2020년도부터 지방하천(탑천 포함) 정비사업이 전라북도로 이관되어 ◦ 현재 익산지방국토관리청에서 수립 중인 탑천 하천기본계획이 완료되면 수변공간 조성 등 탑천 하천정비사업 추진을 전라북도에 건의하겠음.

6. 주요사업 조서 (3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

								(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명	사업량			예산액		집행액		잔액	집행률	비고
	계	51건			48,142,384		22,645,107		25,497,277	47.0
1	평화육교 재가설	L=233㎞ B=35m			2,925,447		2,620,319		305,128	89.6
2	군도23호선 도로확포장	L=3.4㎞ B=16.5-20.5m			7,610,145		2,698,432		4,911,713	35.5
3	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m			775,241		358,166		417,075	46.2
4	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m			1,117,974		501,056		616,918	44.8
5	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m			475,954		460,723		15,231	96.8
6	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m			879,637		680,795		198,842	77.4	2회추경
7	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m			722,187		362,566		359,621	50.2
8	용동 흥왕마을 진입로 도로확.포장	L=0.3km B=6.0m			283,162		276,110		7,052	97.5
9	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=1.01km B=8.0m			529,559		210,150		319,409	39.7
10	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=1.7km B=7.0m			309,496		25,102		284,394	8.1
11	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m			703,911		2,649		701,262	0.4
12	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m			873,211		802,080		71,131	91.9
13	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m			600,000		64,423		535,577	10.7
14	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m			400,000		65,800		334,200	16.5
15	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m			690,887		291,115		399,772	42.1
16	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m			700,000		347,044		352,956	49.6
17	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m			600,000		32,992		567,008	5.5
18	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=23.0m			600,000		74,330		525,670	12.4
19	오산역~상아마을간 도로확포장	L=0.2km B=7.0~8.0m			200,000		17,840		182,160	8.9
20	춘포 창평마을 진입도로 확포장	L=0.7km B=8.0m			100,000		0		100,000	0.0
21	왕궁 군도26호선 도로확포장	L=1.7km B=8.0m			220,000		6,368		213,632	2.9
22	금마 갈산~서편간 도로확포장	L=1.6km B=8.0m			500,000		43,835		456,165	8.8
23	삼기산사거리 회전교차로 설치	회전교차로 설치 1식			330,000		317,076		12,924	96.0
24	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	위험도로 구조개선 1식			700,000		20,325		679,675	2.9
25	오산 장신~만석간 도로확포장	농경지 연결도로 포장 33개소			56,140		52,162		3,978	92.9	1회추경
26	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획용역	정비계획 1식			160,000		42,080		117,920	26.3	1회추경
27	왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m			300,000		40,402		259,598	13.5	1회추경
28	춘포 오룡선 도로확포장	L=0.5km B=8.0m			130,000		19,192		110,808	14.8	1회추경
29	황등 하동마을~동연지하차도간 도로개설	L=0.7km B=8.0m			500,000		0		500,000	0.0	2회추경
30	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	L=0.5km B=8.0m			80,000		0		80,000	0.0	2회추경
31	소하천정비 (생활)	대판천 L=1.25㎞			2,044,459		1,540,356		504,103	75.3
32	소하천정비 (동산천)	동산천 L=1.018㎞			542,899		305,101		237,798	56.2
33	소하천정비 (닭작골천)	닭작골천 L=0.7㎞			372,000		102,587		269,413	27.6
34	지방하천정비 (왕궁천)	하천정비사업 L=9.2㎞			15,389,197		6,760,384		8,628,813	43.9
35	지방하천정비 (동면천)	하천정비사업 L=3.05㎞			1,542,654		486,694		1,055,960	31.6
36	하천제방유지보수(자체)	관내 소하천(102km) 및 지방하천(187km) 유지보수 1식			1,700,032		690,096		1,009,936	40.6	명시이월
37	하천제방유지보수	관내 지방하천(187km) 유지보수 1식			627,073		516,765		110,308	82.4	명시이월
38	국가하천유지관리 (4대강)	국가하천(금강, 강경천 24km) 유지관리 1식			341,000		339,881		1,119	99.7
39	국가하천유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강18km) 유지관리 1식			160,000		156,608		3,392	97.9
40	웅포해지천 인근상습 침수지역배수개선공사	하상정리 L=1.94km, 배수로정비 L=2.16km			227,519		227,501		18	99.9
41	보안등교체 및 설치공사	익산시관내 - 377개소			412,000		395,719		16,281	96.1
42	도심지역 가로등 유지보수단가	도심지역노후 가로등보수 - 1식			120,000		117,522		2,478	97.9
43	산업단지 가로등 유지보수	산업단지 노후가로등정비 - 1식			60,000		57,540		2,460	95.9
44	읍면지역보안등보수	고장보안등보수			120,000		116,768		3,232	97.3
45	동지역 보안등 보수단가	고장보안등보수			78,200		75,717		2,483	96.8
46	전기안전점검 부적합보수	부적합가로등 보수			30,000		28,213		1,787	94.0
47	노후보안등기구교체	노후등기구 보수			42,000		41,215		785	98.1
48	1공단 중앙체육공원 사거리~비원삼거리 앞 가로등 설치공사	가로등설치1식			30,000		28,488		1,512	94.9
49	황등고가도로외4개소 노후가로등교체공사	노후가로등철주 및 등기구 교체 - 1식			84,960		81,839		3,121	96.3
50	남성고옆 도로 가로등 설치공사	가로등설치 - 1식			45,000		44,172		828	98.2
51	1번국도 진출입로 노후가로등 교체공사	노후가로등철주 및 등기구 교체 - 1식			100,440		98,809		1,631	98.4

7. 2019년도 각종 민원(진정·건의·청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
계	6건
진정	사토한 토사들이 논 작물을 재배하기에 적정하지 않으니 더 이상 피해가 없도록 조치요구	김*석	-용강마을배수로정비공사로 사토한 토사들이 논 작물을 재배하기에 적정하지 않으니 정지작업을 조치요구	-2019년 2월 20일 현장에서 민원인, 시공사와 3자대면 시 결론 내렸던 사항으로 회신
진정	함라면 신등리 산161-6 임야 893㎡를 익산시에서 소유권 이전 요구	채*수	- 함라면 신등리 산161-6 임야 893㎡를 주변은 익산시로 소유권이전 되었는데 본인소유만 매입하지 않아 익산시에서 보상하고 소유권이전 요구	-함라면 신등리 산161-6(임 893㎡)은 익산시 농어촌도로(면도 202호) 도로개설공사에 편입된 토지이나 공사 추진 당시 보상이 이루어지지 않은 토지로 판단. 미불용지 매수 청구 시 감정평가 후 보상할 수 있음을 알림
진정	회전교차로 설치 요구	은기동 주민	-차량들이신왕교차로에서 고속으로 질주하지 않도록 회전교차로를설치하여 줄것을 요구	- 회전교차로 설치를 통한 주민불편 및 교통사고 예방을 위하여 우리시에서도 전라북도에 회전교차로 사업이 특별교부세 사업으로 추진될 수 있도록 건의․신청 중에 있음을 알림
진정	평화동 제일아파트 후문설치 공사 완료 요구	제일아파트 관리사무소	-평화동 제일아파트 후문설치공사 완료 요구	-인근 지역주민들과 의견충돌로 후문 설치가 어려울 것으로 예상되어 귀 아파트에서 후문설치 대체사업으로 요청하신 재활용쓰레기장, 수도시설등은 설계반영된 후문 설치의 예산 범위내설치 반영
진정	오산면 장신리 1094-25번지 도로 옆 부지 포장요구	이*자	-오산면 장신리1094-25번지 가장마을 도로 옆을 지나갈 때 거의 90도 각도로 회전해서 진입 하고 있으니 1평정도의 부지를 포장해줄 것을 요구	-오산면 장신리 가장마을 안길정비사업 추진을 위한 행정절차 이행”을 요청한 사항으로, 거주주민 설득 등 가능한 절차를 이행하여 사업이 추진될 수 있도록 노력
진정	노후된 교량 세밀한 조사와 적절한 조치요구	최*빈	-함열읍 남당리792-1번지 농수로를 횡단하는 노후된 교량 구조물에 대하여 세밀한 조사와 적절한 조치요구	소하천정비종합계획(전라북도, 2016.08.)에 의하면 교량 재가설 계획 구간으로 남상천은 소하천종합계획상 15순위 사업 으로서 현재 4순위 닭작골천 소하천정비사업이 진행중으로 따라서 현시점 하천정비 계획 수립이 불가하여 부득이 교량 공사를 할 수 없음을 알림

8. 기금 운용 현황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□

□ 위원회 설치현황

위 원 회 명	설 치 근 거	구성원수	심의․의결․자문 기능여부	비 고
소하천관리위원회	소하천정비법 제26조 (익산시 소하천관리위원회 운영 규정)	7	심 의

□ 단체장이나 부기관장을 위원장으로 선임하고 있는 위원회

위 원 회 명	위 원 장	비 고
익산시 소하천관리위원회	건설국장

10. 용역사업 현황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

								(단위 : 천원)
연번	용 역 명		용역개요		용역비		용역업체		납품일자	용역기간	비고
	계		45		3,465,192
1	오산역~상아마을간 도로확포장공사 실시설계용역		실시설계 1식		9,335		㈜주한건설 기술단		2019. 09.25.	2019.01.17. ~ 2019.09.25.
2	삼기산사거리 회전교차로 설치공사 실시설계용역		실시설계 1식		14,810		(유)장흥건설기술공사		2019. 05.15.	2019.01.24. ~ 2019.05.15.
3	금마 갈산~서편간 도로확포장공사 실시설계용역		실시설계 1식		32,363		㈜우향 이앤씨		2019. 05.27.	2019.02.28. ~ 2019.05.27.
4	왕궁 온수-시대(황암-상발)간 도로확포장공사 실시설계용역		실시설계 1식		35,997		㈜예한 엔지니어링		2019. 05.29.	2019.02.11. ~ 2019.05.29. (일시중지 :2019.05.17.)	행정절차 이행 (환경영향평가 및 심의등)
5	왕궁 군도26호선 도로확포장공사 실시설계용역		실시설계 1식		34,178		㈜우향 이앤씨		2019. 06.06.	2019.02.18. ~ 2019.06.06. (일시중지 :2019.05.27.)
6	용동 흥왕마을 진입로 확포장 지정폐기물 처리용역		지정폐기물처리 1식		3,709		(유)금솔		2019. 06.09	2019.02.22. ~ 2019.06.09.
7	왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사 건설폐기물처리용역		폐기물처리 1식		36,987		(유)가나환경		2020. 07.22.	2019.05.10. ~ 2020.07.22.
8	오산제일교회~정각사간 도로확포장공사 건설폐기물 처리용역		폐기물처리 1식		26,810		(유)진영환경		2020. 08.02.	2019.05.31. ~ 2020.08.02.
9	왕궁 온수-시대(황암-상발)간 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역		소규모환경영향평가 1식		16,661		㈜한가람		2020. 01.20.	2019.06.04. ~ 2020.01.20.
10	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업 폐기물처리용역		폐기물처리 1식		24,777		(유)다일 환경산업		2019. 11.30.	2019.06.04. ~ 2019.11.30. (일시중지 :2019.10.15.)	공사 계약해지절차에 따른 공사지연
11	왕궁 군도26호선 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역		소규모환경영향평가 1식		19,067		㈜한가람		2020. 01.20.	2019.06.14. ~ 2020.01.20.
12	금마 갈산~서편간 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역		소규모환경영향평가 1식		15,305		㈜한가람		2020. 01.20.	2019.06.14. ~ 2020.01.20.
13	삼기산사거리 회전교차로 설치사업 건설폐기물 처리용역		폐기물처리 1식		17,692		㈜상현환경		2019. 12.27.	2019.07.01. ~ 2019.12.27.
14	춘포 오룡선 도로확포장공사 실시설계용역		실시설계 1식		29,343		㈜유현이엔씨		2019. 12.07.	2019.07.15. ~ 2019.12.07. (일시중지 :2019.11.29)	행정절차 이행 (지적분할, 심의 등)
15	왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장공사 실시설계용역		실시설계 1식		40,402		㈜예한 엔지니어링		2019. 12.09.	2019.07.16. ~ 2019.12.09.
16	용안 창리~법성간 도로확포장공사 건설폐기물처리용역		폐기물처리 1식		48,657		(유)개암 이엔티		2019. 11.24.	2019.09.05. ~ 2019.11.24.
17	오산 장신~만석간 농경지 진입도로 포장공사실시설계용역		실시설계 1식		3,458		㈜태원 엔지니어링		2019. 09.20.	2019.09.02. ~ 2019.09.20.
18	황등 하동마을 ~동연지하차도간 도로개설공사 실시설계용역		실시설계 1식		38,100		㈜유현이엔씨		2020. 02.15.	2019.09.30. ~ 2020.02.15. (일시중지 :2020.01.23.)	주민간 노선 협의 지연
19	군도23호선 도로확포장 지정폐기물 철거 감리용역		감리 1식		3,467		㈜건축법인 녹 엔지니어링 건축사사무소		2020. 04.13.	2019.09.25. ~ 2020.04.13.
20	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업 실시설계용역		실시설계 1식		67,632		(유)수오건설		2020. 03.10.	2019.10.16. ~ 2020.03.10. (일시중지 :2020.02.17.)
21	익산시도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본 정비계획(변경)수립용역		용역 1식		140,281		㈜국성건설 엔지니어링		2020. 11.20.	2019.11.22. ~ 2020.11.20.
22	오산면소재지진입도로 확포장 실시설계용역		실시설계 1식		44,080		㈜주한 건설기술단		-	2019.08.30. ~ 2019.12.27. (일시중지 :2019.11.09.)
23	동면천하천정비사업 조사측량용역		측량 L=3.05㎞		55,549		㈜현성		-	2017.07.07. ~ 2019.07.10. (일시중지 :2019.03.02.)	사전환경성, 농지전용등 행정절차이행 일시중지
24	동면천하천정비사업 소규모환경영향평가용역		환경영향평가 L=3.05㎞		39,580		㈜퍼스트 엔지니어링		-	2017.11.2. ~ 2020.01.16. (일시중지 :2019.03.02.)
25	동면천 하천정비사업 실시설계용역(2차분)		실시설계 L=3.05㎞		105,330		㈜경호		-	2019.05.08. ~ 2019.07.06. (일시중지 : 2019.06.12.)
26	동면천 하천정비사업 실시설계용역(1차분)		실시설계 L=3.05㎞		560,000		㈜경호		2019. 01.22.	2017.07.07. .~ 2018.03.03. (일시중지 :2018.03.02.)	관련기관협의 등 행정절차 이행 일시중지
27	동면천 하천정비사업 토질조사용역		토질조사 L=3.05㎞		73,075		제이씨엔㈜		2019. 01.14.	2017.07.07. ~ 2019.01.20.
28	동면천 하천정비사업 경관심의 용역		동면천 경관심의 수행		70,752		㈜디자인 밸리		2020. 04.01.	2019.04.04. ~ 2020.04.08.
29	동면천 하천정비사업 문화재지표 조사 용역		동면천 문화재 지표조사		6,352		원광대학교 산학협력단		2019. 03.15.	2019.01.21. ~ 2019.03.21.
30	동면천 하천정비사업 문화재 시굴 조사 용역		동면천 문화재 시굴조사		47,143		(재)전라문화유산연구원			2019.05.10. ~ 2019.07.21. (일시중지 :2019.06.19.)	영농철 경작에 따른 시굴조사 불가 일시중지
31	동면천 하천정비사업 설계경제성 검토 용역		동면천설계 경제성검토		15,606		㈜한가람		2020. 02.14.	2019.12.02. ~ 2020.02.14.
32	왕궁천하천환경 정비사업		왕궁천 경관심의 수행		48,625		(유)라이프 디자인건설		2019. 06.27.	2019.02.05. ~ 2019.12.31.
33	왕궁천하천정비공사 건설사업관리용역 (감독 권한대행 등)		왕궁천 건설사업관리		908,070		㈜동성 엔지니어링		-	2019.09.03. ~ 2021.05.11.
34	왕궁천하천정비공사 (1지구)폐기물처리용역		폐기물처리 1식		310,327		(유)옥천환경		-	2019.05.10. ~ 2021.04.30.
35	대판천소하천정비공사 폐기물처리용역		폐기물처리 1식		88,981		㈜글로벌 환경		2019. 09.04.	2018.06.05. ~ 2020.02.24.
36	동산천소하천정비공사 실시설계용역		실시설계 1식		103,944		(유)한강 건설		2019. 06.06.	2018.02.28. ~ 2019.06.06.
37	동산천소하천정비공사 토질조사용역		토질조사 L=1.018㎞		51,285		㈜퍼스트 엔지니어링		2019. 05.28.	2018.02.28. ~ 2018.12.15.
38	동산천소하천정비공사 소규모환경영향평가용역		환경영향평가 L=1.018㎞		31,703		㈜퍼스트 엔지니어링		2019. 03.29.	2019.04.02. ~ 2019.04.04.
39	닭작골천소하천정비공사 실시설계용역		실시설계 1식		91,086		(유)새터 이엔지		2020. 01.10.	2019.03.27. ~ 2020.01.11
40	닭작골천소하천정비공사 토질조사용역		토질조사 L=0.7km		57,587		㈜천마 종합건설		2019. 12.09.	2019.03.29. ~ 2020.01.15
41	만경강 신지지구 오산제 외 1개소 정밀안전점검용역		2개소 정밀점검용역		19,589		선진이엔씨		2019. 11.11.	2019.09.17 ~ 2019.11.11
42	2019년 원수우안1지구 1호배수문 외 6개소 정밀점검용역		7개소 정밀점검용역		19,335		㈜한가람		2019. 04.18.	2019.02.12 ~ 2019.04.18
43	2019년 하천제방 유지보수 6건 실시설계용역		실시설계용역 6건		19,624		주식회사 대한건설 연구원		2019. 11.13.	2019.07.11 ~ 2019.11.13
44	만경강 목천지구 파크골프장 조성 실시설계용역		파크골프장 조성 9홀, 25,000㎡		18,921		㈜주한건설 기술단			2019.09.18 ~ 2020.02.13	용역 중지중
45	2019년 하천 유지보수 5건 실시설계용역		실시설계용역 5건		19,617		㈜대한건설 연구원			2019.11.14 ~ 2019.04.12

11. 인․허가 민원 관련

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

12. 각종 공사 설계 변경상황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

										(단위 : 천원)
연번	사업명	예산액		계약액 (변경액)		계약자		계약 일자	변경 일자		공 사 기 간	변경사유
계	18건	79,650,259		29,551,415 (29,881,072)
1	군도23호선 도로확포장공사 건설폐기물처리용역	7,610,144		389,548 (391,346)		(유)현영		2018. 06.15	2019. 03.27		2018.06.27. ~ 2020.04.01.	토지 협의매수 불응구간, 장계획 변경
2	군도23호선 도로확포장공사	7,610,144		4,149,033 (4,183,243)		(주)남북건설		2019. 05.28	2019. 03.27		2019.05.28. ~ 2021.01.03.	전라북도 특정감사 지적사항 반영 등
3	군도23호선 도로확포장공사	7,610,144		4,183,243 (4,186,243)		(주)남북건설		2019. 05.28	2019. 06.21		2019.05.28. ~ 2021.01.03.	연약지반 처리계획 변경 등
4	군도23호선 도로확포장공사 건설폐기물처리용역	7,610,144		391,346 (399,036)		(유)현영		2018. 06.15	2019. 06.25		2018.06.27. ~ 2020.04.01.	우회도로 폐아스콘 추가물량 반영
5	용동 흥왕마을 진입로 확포장공사	283,162		93,702 (107,870)		(유)성우토건		2018. 10.12	2019. 07.16		2018.10.18. ~ 2019.07.22.	보강토옹벽 시공 저촉 우수관 이설 등
6	망성 신성~관산간 도로확포장공사	775,241		373,861 (373,543)		(유)삼운 종합건설		2018. 09.14.	2019. 09.17		2018.09.28. ~ 2020.04.20.	토지 및 지장물 보상지연에 따른 차수조정 등
7	망성 군도10호~ 금지간 도로 확포장공사	722,187		420,578 (428,650)		(유)씨랜드		2018. 10.11	2019. 09.27		2018.10.15. ~ 2019.10.01.	절개지 사면 보호를 위한 옹벽식 L형측구 설치 등
8	함라 칠성~다은간 도로확포장공사	879,637		374,145 (355,986)		(유)광진건설		2018. 10.12	2019. 11.19		2018.10.19. ~ 2019.10.07.	사토량 운반거리 정산 등
9	삼기산사거리 회전교차로 설치 건설폐기물 처리용역	330,000		17,692 (23,340)		(주)상현환경		2019. 06.27	2019. 11.08		2019.07.01. ~ 2019.12.27.	현장확인결과에 따른 아스콘포장깨기 누락물량 반영 등
10	삼기산사거리 회전교차로 설치공사	330,000		173,394 (170,830)		㈜진수 종합건설		2019. 06.26	2019. 11.11		2019.06.26. ~ 2019.12.25.	도로계획고 조정에따른 아스콘 물량 조정 등
11	군도23호선 도로확포장공사	7,610,144		4,186,243 (4,318,743)		(주)남북건설		2019. 05.28	2019. 12.23		2019.05.28. ~ 2021.01.03.	민원에 의한 방음벽 설치, 물가변동 조정 등
12	대판천 소하천정비공사	2,044,459		1,629,490 (1,682,150)		㈜대국건설		2018. 05.10.	2019. 03.28.		2018.05.14. ~ 2020.03.15.	물가변동(E/S)으로 인한 계약금액조정
13	대판천 소하천정비공사	2,044,459		1,682,150 (1,702,170)		㈜대국건설		2018. 05.10.	2019. 08.02.		2018.05.14. ~ 2020.03.15.	현장실정에 맞게 공종(호안) 보강 등
14	왕궁천 하천정비공사	15,389,197		10,280,217 (10,399,400)		㈜시티(51%) ㈜우림종합조경(49%)		2019. 03.11.	2019. 11.28.		2019.03.11. ~ 2021.03.09.	현장실정에 따른 보고사항 반영
15	왕궁천 하천정비공사 (왕궁1지구)1차분	15,389,197		1,161,600 (1,115,400)		㈜시티(51%) ㈜우림종합조경(49%)		2019. 03.11.	2019. 12.16.		2019.03.11. ~ 2021.03.09.	준공정산에 따른 제경비 정산 반영
16	2019년 팔봉동 목천포천 하천준설공사	1,568,000		19,236 (18,318)		㈜성민건설		2019. 01.28	2019. 03.12		2019.01.30. ~ 2019.04.13.	운반거리 변경(감소), 사업연장변경 및 사토장 진입로 반영 등
17	2019년 낭산면 용기천 하천준설공사	1,568,000		19,194 (18,315)		(주)가나안		2019. 01.28	2019. 03.12		2019.02.08. ~ 2019.04.19.	운반거리 변경(감소), 건강 및 연금보험 등 정산
18	2019년 용안생태공원 트랠리스 보수공사	276,000		6,743 (6,489)		(유)티앤지 조경		2019. 09.19	2019. 10.23		2019.09.25. ~ 2019.10.25.	설계 착오에 의한 과다물량계상분 정산

13. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

6번항목 주요사업 조서와 같음

14. 민간에 대한 보조금 집행내역

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

15. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

(단위 : 천원, %)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고
	계		20,688,209	9,895,461	10,792,748	47.8
1	소하천정비 (생활)	대판천 L=1.25㎞	2,044,459	1,540,356	504,103	75.3
2	소하천정비 (동산천)	동산천 L=1.018㎞	542,899	305,101	237,798	56.2
3	소하천정비 (닭작골천)	닭작골천 L=0.7㎞	372,000	102,587	269,413	27.6
4	지방하천정비 (왕궁천)	하천정비사업 L=9.2㎞	15,389,197	6,760,384	8,628,813	43.9
5	지방하천정비 (동면천)	하천정비사업 L=3.05㎞	1,542,654	486,694	1,055,960	31.5
6	하천제방유지보수	관내 지방하천 (187km) 유지보수 1식	296,000	203,850	92,150	68.9	도비/ 명시
7	국가하천유지관리(4대강)	국가하천(금강, 강경천 24km) 유지관리 1식	341,000	339,881	1,119	99.7	국비
8	국가하천유지관리(4대강외)	국가하천(만경강18km)유지관리 1식	160,000	156,608	3,392	97.9	국비

16. 2019년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

								(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명		사업량		이월액		집행액		잔액	집행률	비고
	계				14,440,197		8,982,002		5,458,195	62.2
1	용동 삼정~두무간 도로확포장		L=1.21km B=8.0m		475,954		460,722		15,232	96.8	사고
2	망성 신성~관산간 도로확포장		L=0.91km B=7.0m		383,241		293,165		90,076	76.5	명시, 사고
3	오산 장신~만석간 도로확포장		농경지 진입도로 포장		6,140		6,140		0	100	명시
4	왕궁 온수-시대간(황암~ 상발) 도로확포장		L=3.0km B=8.0m		309,496		25,102		284,394	8.1	명시
5	춘포 토다리~덕동간 도로확포장공사		L=1.0km B=8.0m		253,911		2,648		251,263	1.0	명시
6	용안 창리~법성간 도로확포장		L=0.84km B=8.0m		627,974		488,714		139,260	77.8	명시, 사고
7	함라 칠성~다은간 도로확포장		L=1.0km B=8.0m		453,637		419,524		34,113	92.5	명시
8	망성 군도10호~금지간 도로확포장		L=1.2km B=8.0m		347,187		326,911		20,276	94.2	명시
9	금마 누동~신촌간 도로확포장		L=1.01km B=8.0m		349,559		210,149		139,410	60.1	명시, 사고
10	군도23호선 도로확포장		L=3.4㎞ B=16.5-20.5m		4,630,145		2,624,650		2,005,495	56.7	명시, 사고
11	오산외용(외검선) 도로확포장공사		L=0.8㎞ B=8.0m		10,731		0		10,731	0	명시
12	용동 흥왕마을 진입로 확포장공사		L=0.3km B=6.0m		283,162		276,109		7,053	97.5	명시
13	어양동 어곳~부평간 도로확포장공사		L=0.81km B=8.0m		373,211		367,836		5,375	98.6	명시
14	오산면소재지 진입도로 확포장공사		L=0.81km B=8.0m		100,000		74,330		25,670	74.3	명시
15	오산제일교회~정각사간 도로확포장공사		L=0.4km B=8.0m		190,887		131,080		59,807	68.7	명시
16	황등 도선~외화간 도로확포장		L=0.7km B=8.0m		100,000		65,799		34,201	65.8	명시
17	하나로~소간촌간 도로확포장		L=1.0km B=8.0m		100,000		70,828		29,172	70.8	명시
18	왕궁 양동마을 진입도로 확포장		L=0.6km B=8.0m		100,000		70,151		29,849	70.2	명시
19	금마 신정~중왕간 도로확포장		L=0.6km B=8.0m		100,000		64,442		35,558	64.4	명시
20	평화육교 재가설		L=233㎞ B=35m		425,447		120,319		305,128	28.3	명시
21	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선		위험도로 구조개선 1식		700,000		20,325		679,675	2.9	명시
22	만경강 문학관 토지매입비		토지매입 1식		1,300,000		673,495		626,505	51.8	사고
23	웅포해지천 인근 상습 침수지역 배수개선공사		하상정리 L=1.94km, 배수로정비 L=2.16km		227,519		227,501		18	99.9	사고
24	하천제방유지보수		관내지방하천 (187km) 유지보수 1식		331,073		312,915		18,158	94.5	명시, 사고
25	하천제방유지보수(자체)		관내 소하천 (102km) 및 지방하천(187km) 유지보수 1식		59,565		41,892		17,673	70.3	명시, 사고
26	소하천정비 (생활)		대판천 L=1.25㎞		2,044,459		1,450,356		594,103	70.9	명시 사고
27	소하천정비 (동산천)		동산천 L=1.018km		156,899		156,899		0	100	명시

17. 2019년 예산 중 2020년 명시 및 사고이월 내역

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

							(단위 : 천원)
연번	사 업 명	사업량		예산액		이월액		이월사유	비고
	계			20,230,777		14,828,467
1	군도23호선 도로확포장	L=3.4㎞ B=16.5-20.5m		4,971,003		4,802,886 명시 2,906,218 사고 1,896,668		준공시기 미도래 (준공 ‘21. 01)	명시 사고
2	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m		654,414		417,075 명시 327,000 사고 90,075		준공시기 미도래 (준공 ‘20. 06)	명시 사고
3	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m		957,398		616,918 명시 477,659 사고 139,259		준공시기 미도래 (준공 ‘20. 09)	명시 사고
4	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		879,637		198,843 명시 164,730 사고 34,113		준공시기 미도래 (준공 ‘20. 05)	명시 사고
5	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m		719,877		359,621 명시 339,346 사고 20,275		준공시기 미도래 (준공 ‘20. 06)	명시 사고
6	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=1.01km B=8.0m		470,652		319,409 명시 180,000 사고 139,409		준공시기 미도래 (준공 ‘20.12.)	명시 사고
7	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=1.7km B=7.0m		309,496		284,394		집행시기 미도래 (실시설계 및 행정절차 이행 중)	사고
8	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		703,911		701,262 명시 450,000 사고 251,262		집행시기 미도래 (토지소유자 민원에 따른 보상 지연)	명시 사고
9	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m		873,211		71,131 명시 65,757 사고 5,374		집행시기 미도래 (보상중)	명시 사고
10	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m		600,000		535,577 명시 500,000 사고 35,577		집행시기 미도래 (실시설계용역 및 행정절차 이행 중)	명시 사고
11	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m		400,000		334,200 명시 300,000 사고 34,200		집행시기 미도래 (보상 중)	명시 사고
12	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m		690,887		399,772 명시 339,966 사고 59,806		준공시기 미도래 (준공 ‘20.06)	명시 사고
13	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m		700,000		352,956 명시 323,108 사고 29,848		집행시기 미도래 (준공 ‘20.09)	명시 사고
14	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		600,000		567,008 명시 499,980 사고 67,028		집행시기 미도래 (실시설계용역 및 행정절차 이행 중)	명시 사고
15	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=23.0m		600,000		525,669 명시 500,000 사고 25,669		집행시기 미도래 (실시설계용역 및 행정절차 이행중)	명시 사고
16	오산역~상아마을간 도로확포장	L=0.2km B=7.0-8.0m		200,000		182,160		집행시기 미도래 (행정절차 이행 및 보상중)	명시
17	춘포 창평마을 진입도로 확포장	L=0.7km B=8.0m		100,000		100,000		실시설계 발주(‘20.01)	명시
18	왕궁 군도26호선 도로확포장	L=1.7km B=8.0m		220,000		213,632		집행시기 미도래 (실시설계 및 행정절차 이행 중)	명시
19	금마 갈산~서편간 도로확포장	L=1.6km B=8.0m		500,000		456,165		집행시기 미도래 (행정절차 이행 및 소규모환경영향평가중)	명시
20	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	회전교차로 1식		700,000		373,873		준공시기 미도래 (준공 ‘20. 06)	사고
21	오산 장신-만석간 도로확포장	L=1.6km B=8.0m		50,000		3,978		준공시기 미도래 (준공 ‘20. 03)	명시
22	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획용역	용역 1식		160,000		117,920		* 준공시기 미도래 (준공 ‘20.11) * 1회추경	명시
23	왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m		300,000		259,598		* 집행시기 미도래 (행정절차 이행 중) * 1회추경	명시
24	춘포 오룡선 도로확포장	L=0.5km B=8.0m		130,000		110,808		* 집행시기 미도래 (실시설계용역 및 행정절차 이행중) * 1회추경	명시
25	황등 하동마을~동연지하차도간 우회도로 개설공사	L=0.7km B=8.0m		500,000		500,000		* 집행시기 미도래 (실시설계용역 중) * 2회추경	명시
26	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	L=0.5km B=8.0m		80,000		80,000		* 집행시기 미도래 (실시설계용역 중) * 2회추경	명시
27	평화육교 재가설	L=233㎞ B=35m		423,601		305,128		준공시기 미도래 (준공 ‘20.06.)	사고
28	하천제방유지보수 (자체)	소하천 및 지방하천 유지보수 1식		1,568,000		933,526		실시설계 진행 중 일부추진 중 이월하여 집행 (파크골프장조성,초화류식재공사 등)	명시
29	하천제방유지보수	지방하천 유지보수 1식		296,000		92,150		공사 발주 및 추진 중 이월하여 집행	명시
30	만경강 물문학관 토지매입비	토지매입 1식		50,000		50,000		협의보상 어려움으로 19년 10월 수용재결신청	명시
31	만경강유역 협의회 부담금	자치단체협의회 공동부담금 1식		50,000		50,000		만경강유역권 연계협력 기본계획수립용역을 위한 5개 지자체 사전협의 지연	명시
32	동산천소하천정비공사	소하천정비 L=1,018km		383,690		237,797		사업완료(2021년) 준공시기미도래
33	닭작골천소하천정비공사	소하천정비 L=1,4km		372,000		269,413		행정절차이행에따른지연
34	시군농어촌도로확포장사업			17,000		5,598		행정절차이행에따른지연

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

21. 국․도비 반납 현황(2019년 반납건)

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

(단위: 천원)

사 업 명	예 산 액	집 행 액	반 납 액	반납사유
국가하천유지관리 (4대강 외)	294,312	128,762	10,914	2017년 국가하천 유지보수 목적외 사용 집행
국가하천유지관리 (4대강 외)	294,963	241,730	53,233	2018년 국가하천 유지보수 집행 잔액
국가하천유지관리 (4대강)	847,882	840,945	7,030	2018년 국가하천 유지보수 집행 잔액 및 목적외 사용 집행

22. 2019년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

23. 2019년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

24. 2019년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

해 당 사 항 없 음

25. 2019년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

(단위 : 백만원)

연번	위치	사 업 명	사 업 개 요	사업 기간	사 업 비					사업 구분	공정	비고
					총 사업비	기투자	이월액	2019 예산	금 후
1	춘포	춘포창평마을 진입도로 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m	2019 ~ 2021	1,500	-	-	100	1,400	도로	설계발주	(익산천 저촉)
2	황등	황등 하동마을~동연지하차도간 도로개설공사	L=0.6km B=8.0m	2019 ~ 2022	1,250	-	-	500	750	도로	설계 중	2회추경
3	왕궁	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업	L=0.5km B=8.0m	2019 ~ 2021	486	-	-	80	406	도로	설계 20%	2회 추경

26. 소송 사건 현황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

사건번호	사건명	원 고	피 고	접수일	변호사 선임사항	추진사항 (판,종결일)
2019나 2042632	공사대금 청구의 소	지에스건설 ㈜	한국철도시설공단 (익산시)	2019.9.16.	김종성 법률사무소	진행중

27. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

□ 민원접수 현황

연번	관 련 민 원	접수건수	처리건수	비 고
	계	56	56
1	도로개설 및 확포장 관련 민원	3	3	시정에바란다
2	가로등·보안등관련 민원	43	43
3	하천관련 민원	10	10

□ 주요처리현황

◦ 익산쌍용아파트~이편한세상아파트간 육교설치 요청

⇒ 「도로의구조·시설기준에 관한 규칙」및「국토교통부 예규 제237호 보도설치 및 관리지침」에 의거 도로의 상황, 보행자의 안전 및 경제성등을 감안하여
설치하도록 규정하고 있으며, 「도로교통시행규칙」에  의거 육교로부터 200미터 이내 횡단보도를 설치할수 없도록 규정하고있음.

⇒ 이와 관련하여 관련법 및 도로상황, 경제성등을 종합적으로 고려하여 설치여부를 검토할 예정임을 회신.

◦ 쓰레기 처리 요청

⇒ 현장방문 확인한 결과 청소자원과에서 하천내 환경정비사업 일환으로
쓰레기를 수거하고 일정장소에 집하하였으며, 조속한 시일내에 처리할
계획임을 알려드리며, 또한 안내표지판 설치, 상시 순찰 및 단속을
지속적으로 실시하여 깨끗한 하천으로 조성될수 있도록 노력하겠음.

◦ 남성여고 차량도로 안전시설 보강요청

⇒남성여고 정문~영등소라성당간 도로확포장공사 구간에 대하여 2019년 하반기 통학로 조도 개선을 위한 가로등 신설(12개소), 후문 주변 노후가로등 LED로 교체
(9개소) 등 총 21개소에 대하여 조명환경개선을 완료하였음을 알림

감사자료 과 요구사항

1. 2019년도 시･군도 농어촌도로 확포장 사업

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

□ 진행중인 시군도 및 농촌도로 현황(이월 및 계속사업)

										(단위 : 백만원)
연번	사 업 명	사업개요		예 산 액							추진실적	노선명	비고
				총 사업비		기투자		2019년 예산액	금후 투자
계	30개사업	L=26.023km B=6.5-24m		102,072		62,001		15,863	24,208
1	평화육교 재가설사업	L=233m		49,700		43,205		4,600	1,895		공사중		시비 19,000
2	군도23호선 도로확포장사업	L=3.4km B=16.5-20.5m		12,500		8,520		2,980	1,000		공사중	군도23호
3	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m		1,198		806		392	0		공사중	망성 303 (신선선)
4	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m		1,250		760		490	0		공사중	용안 203 (자석선)
5	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m		1,847		1,847		0	0		준공	용동 204 (삼두선)
6	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		1,001		575		426	0		공사중	함라 201 (진다선)
7	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m		1,055		680		375	0		공사중	망성 102 (수용선)
8	용동 흥왕마을 진입로 도로확.포장	L=0.3km B=6.0m		370		370		0	0		준공	용동 209 (흥왕선)
9	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m		800		505		180	115		공사중	금마 102 (누부선)
10	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m		2,803		616		0	2,187		설계중	군도 21호
11	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		1,920		427		450	1,043		보상	춘포 103 (신화선)
12	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m		3,100		450		500	2,150		보상	시도 1268
13	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m		1,500		100		500	900		설계중	금마 202 (서오선)
14	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m		1,000		100		300	600		보상	황등 104 (황팔선)
15	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m		948		200		500	248		공사중	오산 203 (신수선)
16	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m		1.221		100		600	521		공사중	왕궁 207 (양곡선)
17	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		1,400		100		500	800		설계중	삼기 203 (석라선)
18	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=24.0m		5,000		100		500	4,400		설계중	군도2호
19	오산역 –상아마을간 도로확포장공사	L=0.2km B=8.0m		200		0		200	0		행정절차 이행,보상	오산 203 (신수선)
20	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	L=0.7km B=8.0m		1,500		0		100	1,400		설계발주	춘포 308 (창평선)
21	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m		2,970		577		220	2,173		설계중	왕궁 210 (신기선)
22	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m		2,829		279		500	2,050		설계중	금마 101 (서삼선)
23	삼기산사거리 회전교차로설치	회전교차로 1식		330		0		330	0		준공	삼기209 삼기103 지방도722	국고 140
24	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	회전교차로 1식		700		700		0	0		공사중	지방도706 용안201	특교 700
25	오산 장신~만석간 도로확.포장	농경지연결 도로 33개소		1,034		984		50	0		준공	오산 301 (용연선)
26	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	정비계획 1식		160		0		160	0		용역중
27	왕궁 금오동~군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m		1,000		0		300	700		설계중	왕궁 102 (농장선)
28	춘포 오룡선 도로확.포장	L=0.5km B=8.0m		1,000		0		130	870		설계중	춘포 102 (오룡선)
29	황등 하동마을~ 동연지하차도간 도로솩포장사업	L=0.6km B=8.0m		1,250		0		500	750		설계중	농어촌도로
30	왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업	L=0.5km B=8.0m		486		0		80	406		설계중	군도19호	국고 243

□ 2019년도 예산 미확보사업(이월및계속사업)

해 당 사 항 없 음

□ 2019년도 신규 사업	(단위 : 백만원)

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2019 예산	금후
계	10개소		11,725	856	2,520	8,349
오산역 –상아마을간 도로확포장공사	L=0.2km B=8.0m	2019 ~ 2020	200	0	200	0	보상중
춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	L=0.7km B=8.0m	2019 ~ 2021	1,500	0	100	1,400	설계중
왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2019 ~ 2022	2,970	577	220	2,173	설계중
금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2019 ~ 2021	2,829	279	500	2,050	설계중
삼기산사거리 회전교차로설치	회전교차로 1식	2019	330	0	330	0	준공
시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	정비계획 1식	2019 ~ 2020	160	0	160	0	용역중
왕궁 금오동~군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m	2019 ~ 2022	1,000	0	300	700	설계중
춘포 오룡선 도로확.포장	L=0.5km B=8.0m	2019 ~ 2022	1,000	0	130	870	설계중
황등 하동마을~ 동연지하차도간 도로솩포장사업	L=0.6km B=8.0m	2019 ~ 2022	1,250	0	500	750	설계중
왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업	L=0.5km B=8.0m	2019 ~ 2021	486	0	80	406	설계중

□ 2019년 준공된 사업	(단위 : 백만원)

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2019 예산	금후
계	3개소		2,547	2,217	330	0
용동 삼정~두무간 도로확포장	L=1.21km B=8.0m	2015 ~ 2019	1,847	1,847	0	0	준공	2019.03.26.
용동 흥왕마을 진입로 확포장	L=0.3km B=6.0m	2018 ~ 2019	370	370	0	0	준공	2019.07.18.
삼기산사거리 회전교차로 설치	회전교차로 1식	2019	330	0	330	0	준공	2019.11.14.

2. 군도 23호선 도로 확·포장사업

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로~ 삼기 일반산업단지

○ 사업기간 : 2016. ~ 2021.

○ 사 업 량 : 도로확포장 L=3.4km, B=16.5~20.5m (2차로⇒4차로)

○ 총사업비 : 125억원(공사비 90  보상비 31  기타 4)

□ 추 진 실 적

○ 지방재정 투융자 심사	: 2013. 6.  4.

○ 도시계획 시설결정 및 실시설계 용역	: 2013. 7.~2015. 1.

○ 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시	: 2015. 6. 15.

○ 실시계획인가 고시(익산시 고시 제 2016-4호)	: 2016. 1.  8.

○ 감정평가 및 손실보상	: 2016. 6.~현재

○ 지방재정투자 (재)심사	: 2017. 5. 19.

▸총사업비 변경 : 78억원 → 125억원

○ 공사 착공	: 2019. 5. 28.

○ 공사 추진(1차분)	: 2019. 5.~현재

▸공사 공정율 – 60%(토공 및 배수공)

□ 금 후 계 획

○ 잔여토지 손실보상 및 수용재결	: 2020. 4.~10.

○ 잔여공사 추진 (토공, 배수공, 구조물공,포장공 등)	: 2020. 4.~2021. 1.

○ 공사 준공	: 2021. 1.

3. 평화육교 재가설 사업

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	도로시설계장		이 우 진	□

□ 필  요  성

○ 안전등급 D등급인 평화육교 재가설로 대중교통 안전성 확보 및 KTX
호남고속철도 완전한 정상화 실현

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

○ 사업기간 : 2015. ~ 2021. 7.

○ 사 업 량 : 교량 재가설 L=233m(4차로⇒6차로)

○ 총사업비 : 497억원(국비 307  시비 190)

○ 사업시행 : 한국철도시설공단

□ 추 진 실 적

○ 평화육교 재가설 사업 건의(기획재정부 등)	: 2011. ~ 2014.

○ 국비 지원 확정(기재부 총사업비 승인)	: 2015.  4.  6.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(한국철도시설공단)	: 2015. 11.~2017. 4.

○ 보상계획 열람공고 및 손실보상	: 2017.  9.~12.

▸ 토지 28필지 6,397㎡, 지장물 23건

○ 평화육교 재가설 공사 추진	: 2017.  7.~현재

▸ 대체우회도로 확장 변경 설계 완료	: 2017.  7.~2018. 4.

▸ 대체우회도로 설치(4차로) 및 운영	: 2018.  4.~현재

▸ 육교 철거(전면통제 2019. 7 ~ 공사 완료시)	: 2018.  7.~9.

※ 전체 공정율 53%

□ 금 후 계 획

○ 평화육교 재가설공사 추진	: 2020.  4.~2021. 7.

▸ 농업용수로 이설, 접속램프 및 교량 재가설

○ 평화육교 완전개통	: 2021. 7.

4. 왕궁천 하천 환경 정비사업

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명		위 치	사업기간	사 업 비	사업 내용
왕궁천 하천환경 정비사업		춘포면 익산천 합류점 ~ 왕궁면 동용리	2015. ~ 2022.	47,368(국23,684 도9,474 시14,210) ※총사업비 변경(247→474, 18.10.24.)	하천정비 L=9.25km (축제 및 보축, 교량가설등)
	1지구	익산천 합류점 (춘포면) ~흥암교	2015. ~ 2020.	23,693(국11,847 도4,739 시7,107)	하천정비 L=4.62km (축제 및 보축, 교량가설등) ▸착공 : ‘19.3.11.
	2지구	흥암교 ~보석박물관 (왕궁면 동용리)	2020. ~ 2022.	23,675(국11,837 도4,735 시7,103)	하천정비 L=4.63km (축제 및 보축, 교량가설등)

□ 추 진 실 적

○ 실시설계 협의(익산지방국토관리청, 2회)	: 2016. 4./2017.  7.

○ 주민설명회(2회)	: 2016. 6./2017. 10.

○ 설계 경제성 검토(VE)	: 2016. 12.

○ 건설기술심의	: 2018.  3.

○ 경관/공공디자인심의	: 2018.  4.

○ 총사업비 조정(247→474억원, 증227) 승인(국토부)	: 2018. 10.

○ 실시계획인가(1지구)	: 2018. 11.

○ 공사(1지구) 착수	: 2019.  3.

○ 공사(2지구) 착수	: 2020.  3.

□ 금 후 계 획

○ 공사(1지구) 2,3차분 준공	: 2020.   7.

○ 공사(2지구) 1차분 준공	: 2020.  10.

5. 동면천 하천 환경 정비사업

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업기간	사 업 비	사업 내용
동면천 하천환경 정비사업	왕궁면 동촌리~ 왕궁면 부상천 합류점	2017. ~ 2023.	15,489(국7,740 도3,096 시4,644)	하천정비 L=3.05km (제방축조 및 보축, 교량가설등) ▸실시설계 용역중 : 70%

□ 추 진 실 적

○ 주민설명회(1차)	: 2018.  4.

○ 경관심의 용역 착수	: 2018.  4.

○ 실시설계 협의(익산지방국토관리청, 1차)	: 2018.  7.

○ 경관/ 공공디자인 심의	: 2018. 12./2019. 2.

○ 지역수자원위원회 심의(전북도)	: 2019.  3.

- 동면천 하천기본계획 수정(계획홍수위 변동 등)

○ 동면천 하천기본계획 고시(국토부)	: 2019.  8.

○ 동면천 사업기한 조정 승인(2020 → 2023)	: 2019. 10.

□ 금 후 계 획

○ 소규모환경영항평가 협의	: 2020.  4.

○ 실시설계 협의(2차, 국토부)	: 2020.  4.

○ 편입토지 보상 추진	: 2020.  5.

○ 총사업비 협의	: 2020.  6.

○ 하천공사 시행계획 고시	: 2020.  7.

6. 소하천 정비사업(대판천, 동산천, 닭작골천)

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천시설계장		양 기 주	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업기간	사 업 비	사업 내용
대판천 소하천 정비사업	삼기면 연동리~ 낭산면 성남리	2017. ~ 2020.	3,076(국1,538 시1,538)	하천정비 L=1.253km (축제 및 보축, 교량가설 등) ▸공사 완료(2019.08.29.)
동산천 소하천 정비사업	웅포면 맹산리 일원	2018. ~ 2021.	3,210(국1,605 시1,605)	하천정비 L=1.018km (축제 및 보축, 교량가설 등) ▸공사중: 30%(공정)
닭작골천 소하천 정비사업	여산면 여산리 일원	2019. ~ 2021.	3,902(국1,951 시1,951)	하천정비 L=0.7km (축제 및 보축, 교량가설 등) ▸행정절차중

□ 추 진 실 적

【 대판천 】

○ 공사 착수	: 2018.  5.

○ 공사 완료	: 2019.  8.

【 동산천 】

○ 사전설계검토(전북도)	: 2019.  1.

○ 보상계획 공고	: 2019.  2.

○ 부서 협의 및 원가심사	: 2019.  4.

○ 공사 발주	: 2019. 10.

【 닭작골천 】

○ 실시설계용역 착수	: 2019.  3.

○ 주민설명회	: 2019.  9.

□ 금 후 계 획

【 동산천 】

○ 공사 완료	: 2021.  2.

【 닭작골천 】

○ 사전설계검토(전북도)	: 2020.  3.

○ 보상공고 및 편입토지보상	: 2020.  4.

○ 원가심사(전북도)	: 2020.  4.

○ 공사 발주	: 2020.  9.

7. 만경강 문화관 조성사업

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

○ 사업기간 : 2015. 10. ~ 2021. 6.

○ 사 업 비 : 11,350백만원(국비 10,000  시비 1,350)

○ 사업내용

▸규    모 : 13,814㎡(지하 1층, 지상2층, 연면적 1,686㎡)

▸주요시설 : 다목적실, 로비, 사무실 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

○ 사업시행자 : 익산지방국토관리청 하천계획과

□ 추 진 실 적

○ 만경강 하천환경정비사업 시행에 따른 물문화관 건립요청(익산청)	: 2015.  3. 17.

○ 문화관 조성에 따른 MOU 체결(익산시,김제시,익산지방국토관리청)	: 2017.  4.  7.

○ 만경강문화관 실시설계 완료(건축, 토목 등 100억)	: 2017. 12. 31.

○ 만경강 문화관 건립에 따른 TF팀 구성 및 운영(2회)	: 2018.  2.~ 3.

▸익산국토청 4명, 익산시 2명, 김제시 2명

○ 도시관리계획 결정(변경) 익산․김제 도시건축공동위원회 심의(원안가결)	: 2018. 11. 7.~29.

○ 토지 및 지장물 협의 매수	: 2018.12.~2019.10.

○ 익산지방국토관리청 건축공사 사업자 선정 및 착수	: 2019. 10.~12.

○ 중앙토지수용위원회 토지수용재결, 공탁 및 소유권이전 완료	: 2019.10.~2020. 3.

※보상비 1,350백만원 중 1,302백만원 지출, 2가구에 대한 이사비 등 미지출

□ 금 후 계 획

○ 건축물 내 컨텐츠관련 발주(20억)	: 2020. 11.~

○ 만경강문화관 조성사업 추진(익산지방국토관리청)	: 2019.12.~2021. 6.

8. 국가하천 유지 관리사업

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 국가하천 (금강, 만경강, 강경천) : 34.2㎞

▸금강 21.26km, 만경강 10.4km, 강경천 2.54km

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 541백만원(국비 100%)

○ 사업내용 : 국가하천(금강, 만경강, 강경천) 유지관리

□ 추 진 실 적

○ 만경강 생태하천 정비사업

▸만경강 제방, 자전거도로 및 산책로 풀깍기 등

▸신지지구 정밀안전점검용역, 제방 및 자전거도로 노후차선 도색공사

○ 만경강 환경정비공사

▸인부/내용 : 만경강 인근지역 주민/풀깍기, 예초, 꽃길 조성지 관리 등

▸기간/인원 : 2019. 5. ~ 11.(5회) / 6여명(회당)

○ 금강 생태하천 정비사업

▸금강 자전거도로 및 용안생태공원 산책로 풀깍기 등

▸용안생태공원 산책로 황토포장 보수공사, 정자 및 트랠리스 등 보수공사

○ 금강 생태하천 환경정비공사

▸인부/내용 : 용안, 성당면 인근지역 주민/풀깍기, 예초, 꽃길 조성지 관리 등

▸기간/인원 : 2019. 4. ~ 11.(5회) / 10여명(회당)

□ 금 후 계 획

○ 2020년 국가하천(금강, 만경강) 정비사업 추진	: 2020. 3. ~ 12.

▸만경강 제방, 자전거도로 및 산책로 풀깍기 등

▸용안생태습지 자전거도로 및 산책로 풀깍기, 벤치 및 파고라 보수, 산책로 정비 등

○ 2020년 (금강, 만경강) 환경정비사업 추진	: 2020. 4. ~ 11.

▸풀깍기, 화장실 등 친수시설 청소 및 관리, 초화류 식재 등

9. 하천제방 유지보수(자체)

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	하천관리계장		최 홍 기	□

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 익산시 관내 지방하천 및 소하천 일원

○ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2019. 12.

○ 사 업 비 : 1,700백만원(시비)

○ 규    모 : 관내 지방하천 27개소(187km) 및 소하천 62개소(102.2km)

○ 주요내용 : 관내 지방하천 및 소하천 준설, 제방보수, 제초, 하천환경정비 등

□ 추 진 실 적

○ 오산면 오산천 등 준설공사 12건(하천준설 L=8,675m, V=30,836㎡) 추진

○ 2019년 용동면 산북천, 강경천 제방포장공사(콘크리트포장 L=1,217m, B=4m) 추진

○ 은기동 탑천 제방보수공사(조경석 쌓기 L=13m, H=4m, 부대공 1식) 추진

○ 여산면 일월천 석축보수공사(석축쌓기 L=34m, H=2.0m) 추진

○ 팔봉동 탑천제방, 목천포천제방, 기양천 제방 풀깍기 공사 추진

○ 하천유지보수 단가계약 1차~2차(준설, 응급복구, 제초작업 등) 추진

□ 금 후 계 획

○ 2020년 하천제방 유지보수(자체) 사업 추진	: 2020. 1. ~ 12.

▸춘포면 익산천, 팔봉동 목천포천, 삼기면 기양천 등 하천준설사업

▸용동면 산북천, 여산면 강경천 등 제방포장사업

▸석왕천, 탑천 등 지방 및 소하천 제초작업, 응급복구 등 시설 유지보수

▸목천동 파크골프장조성, 용안생태습지 조경공사 등 사업 추진

10. 도로조명시설 조도개선

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

□ 사 업 개 요

○ 사업위치 : 익산시 일원

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

○ 사업예산 : 1,163백만원

○ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행 불편지역 도로조명 보수 및 설치

(단위 : 천원)

구 분	세 부 사 업	사 업 개 요	예산액	비 고
계		15개 사업	1,162,600
보 안 등 신규설치	생활환경개선보안등설치	보안등신규설치 331개소	360,000
	주민숙원사업보안등설치	보안등신규설치 46개소	52,000
	서동로6길8-1외3개소보안등설치공사	보안등신규설치4개소	4,500	도보조
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비120개소	120,000
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 60개소	60,000
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	120,000
	동지역 보안등 보수	동지역 고장보안등 수리	78,200
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	42,000
	전기안전점검부적합보수단가	점검부적합보수 300개소	30,000
	1공단 중앙체육공원 사거리 ~비원삼거리앞 가로등 설치공사	LED가로등 설치15개소	30,000
	황등고가도로외4개소노후가로등교체공사	노후가로등교체48개소	84,960
	남성고옆도로가로등설치공사	가로등설치 1식	45,000
	1번국도진출입로노후가로등교체공사	노후가로등교체81개소	100,440
	석방육교주변가로등설치공사	가로등설치11개소	13,000

□ 추 진 실 적 : 1,121,212 천원 (집행율 96.4%)

○ 보안등 신규설치 및 교체공사(334개소)	: 395,720천원

○ 노후 가로등 유지보수단가 외 11개사업	: 725,492천원

11. 도로조명 고장민원 처리 내역

확인자	:	건설과장		조 정 태	□
작성자	:	가로등관리계장		곽 경 원	□

□ 필  요  성

○ 도로조명 고장민원 접수에서 처리까지의 기간을 단축하여 여성 및 노약자의 야간통행 편익제공으로 보행자 통행불편을 최소화 하고자 함.

□ 사 업 개 요

○ 2019년도 생활민원 처리 현황

(2019년 12월말 현재)

구 분	설치수량	처리건수	평균처리일수	비고
계	28,720 등	6,769
가로등	9,395 등	1,175	3일
보안등	19,325 등	5,594	5일

□ 쟁점 및 애로사항

○ 고장민원이 읍․면․동에 산재해 있고 민원처리반이 가로등, 보안등 각 1개조로 이동에 따른 시간소요로 고장민원 처리가 지연되어 재차 민원 발생함.

□ 추 진 실 적

○ 도로조명 생활민원처리 지역별 이원화 시행	: 2019. 1. ~ 12.

▸함열읍외 10개면	: 단가계약에 따른 민원처리

▸18개 면･동	: 가로등관리 자체인원으로 처리

○ 도로조명 생활민원 처리(년중)	: 2019. 1. ~ 12.