2020.  7.

제228회 익산시의회(임시회)

― 2020 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	환경안전국

교통행정과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예 산 집 행 실 적
□	2020 상반기 성과 및 반성
□	2020 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전하고 편리한 시민중심 교통도시 구현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	교통사고 예방 및 교통불편 최소화 차량 소통 원활 및 선진교통 환경 조성 불법 주․정차없는 선진교통 문화 정착

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	유라시아 대륙<국제>철도 거점역 기반 구축 교통 안전시설물 확충으로 교통사고 예방 교통체계개선 및 주차공간 확보로 시민편익증진 대중교통 노선체계 조정으로 대중교통 활성화 추진 무인단속 CCTV운영 내실화로 선진교통 문화 정착

일  반  현  황

□ 기          구

					교통행정과
철도정책			교통물류					주차정책			주차관리			대중교통

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	26		1	5	6	7	7
현 원	26		1	9	7	2	7
증 감				4	1	△5

□ 사 무 분 장

◦ 철도정책 : 도시교통행정 종합계획 , 철도정책 수립, 철도 및 신교통수단 업무, 유라시아철도 거점기반 구축사업, 무단방치차량 업무전반 등

◦ 교통물류 : 교통물류 종합계획, 어린이보호구역 지정 및 관리, 교통안전시설물 설치관리, 교통신호기 설치 및 유지관리, 지능형교통체계구축사업 등

◦ 주차정책 : 주차정책 및 주차관리에 관한 사항, 주차장 정비 기본계획 수립, 주차장 설치, 주차장특별회계 운영, 교통유발 부담금 부과·징수 등

◦ 주차관리 : 불법 주‧정차 지도단속, 불법 주․정차 과태료 부과․징수 무인단속CCTV 상황실운영, 화물차 불법 밤샘주차 지도단속 등

◦ 대중교통 : 대중교통기본계획수립, 택시․시내버스․화물자동차 운송사업,자동차관리사업 업무전반, 유가보조금 지급업무, 교통안전진단 계획수립 및 시행 등

□ 교통안전시설물 설치현황

(2020. 6. 30)

신 호 기(개소)						교통안전표시(개)
합계	신호기	경보등	경광등	음 향 신호기	잔여시간표 시 기	합계	주의 표시	규제 표시	지시 표시	보조표시
1,200	437	332	108	30	293	8,267	3,312	2,562	1,518	875

□ 운수업체 현황

(2020. 6. 30)

구 분	합계	버 스		택 시		화 물			장의차	비고
		시내	전세	회사	개인	용달 개인	일반 화물	개별 화물
업체수	137	3	8	13	-	-	101	-	12
면허대수	5,182	164	275	403	1,011	467	2,205	638	19

□ 자동차관리사업체 현황

(2020. 6. 30)

합계	매매업	정 비 업					해체재활용업	비 고
		소 계	종 합	소 형	원동기	전 문
331	31	296	39	11	1	245	4

□ 불법 주․정차 단속구역 지정현황

(2020. 6. 30)

구 분	노 선	구 간 (㎞)	비 고
단속 구역	155	122.72
견인 구역	155	122.72

□ 불법 주․정차 단속장비 보유현황

(2020. 6. 30)

구 분	합 계	CCTV			디지털 카메라	비 고
		소 계	무인단속	이동식 단속차량
보유현황	84대	82대	79대	3대	2대

□ 주차장 현황

(2020. 6. 30)

합 계		노 상		노 외		비 고
개소	면수	개소	면수	개소	면수
344	14,655	62	4,510	282	10,145

2020 예산집행실적

【 2020. 6. 30. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
교통행정과				56,701,517	34,421,416	22,280,101	60.7%
	교통행정 개선			2,890,750	2,048,689	842,061	70.9%
		지능형 교통체계 구축		466,237	211,762	254,475	45.4%
			지능형교통체계 구축사업 추진	466,237	211,762	254,475	45.4%
		교통약자 이동권 보장		1,612,784	1,157,130	455,654	71.8%
			교통유발부담금 부과 및 조정	25,348	0	25,348	0%	10월 교통유발부담금 부과예정
			교통운영 홍보사업	45,480	30,800	14,680	67.7%
			교통약자 이동편의 증진	900,000	811,489	88,511	90.2%
			저상버스도입 보조	366,556	90,168	276,388	24.6%
			특별교통수단 도입보조 (장애인콜택시 구입)	84,000	83,773	227	99.7%
			저상버스 운영비 지원	135,000	135,000	0	100%
			시내버스 운행 중단 대비 임시차량 운영비	6,400	0	6,400	0%
			고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원	50,000	5,900	44,100	11.8%
		깨끗한 거리 질서 확립		811,729	679,797	131,932	83.8%
			무인단속 시스템 운영	647,596	555,388	92,208	85.8%
			이동식 단속차량 운영	39,748	32,660	7,088	82.2%
			무단방치차량 정리 및 지도	7,525	4,290	3,235	57.0%
			행사질서 계도 및 교통질서 홍보	66,900	42,500	24,400	63.5%
			주정차 지도단속	49,960	44,959	5,001	90.0%
	대중교통 육성 지원			38,915,742	22,725,075	16,190,667	58.4%
		대중교통시설 개선		1,233,398	829,744	403,654	67.3%
			승강장 설치 및 유지보수	355,860	178,300	177,560	50.1%
			시내버스 승강장 환경정비	8,160	8,160	0	100%
			승강장 시설 개선사업(보조)	60,000	7,189	52,811	12.0%
			기타 지역특성화산업육성	50,000	50,000	0	100%
			도시교통정비 계획	400,000	244,981	155,019	61.3%
			광역BIS지원사업	341,048	341,048	0	100%
			택시운행정보관리시스템 구축 및 운영	18,330	66	18,264	0.4%

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		운수업계 운영 지원		37,530,994	21,782,899	15,748,095	58.0%
			시외버스 정류소 손실보상	70,500	35,000	35,500	49.7%
			운수업계 유가보조금 지급	18,300,000	9,035,971	9,264,029	49.4%
			시내, 농어촌버스 벽지노선 손실보상금	1,280,000	309,616	970,384	24.2%
			시내, 농어촌버스 재정지원	12,649,425	9,896,357	2,753,068	78.2%
			시내버스 무료환승 손실 보전	2,420,000	853,243	1,566,757	35.3%
			운수업체 종사자 지원	931,000	720,000	211,000	77.3%
			운수업체 종사자 선진지 견학 지원	27,500	27,000	500	98.2%
			시내버스 승강장명 표지 제작 및 설치 지원	137,000	137,000	0	100%
			택시브랜드 사업	65,191	12,852	52,339	19.7%
			택시업계 운영 지원	442,170	243,094	199,076	55.0%
			업무용택시 운영	30,000	20,000	10,000	66.7%
			시내버스 노후차량 교체지원	380,000	140,000	240,000	36.8%
			차로이탈경고장치 장착지원 사업	64,804	7,200	57,604	11.1%
			공공형택시 운영	200,000	64,600	135,400	32.3%
			행복콜버스 운영	468,192	244,096	224,096	52.1%
			여객자동차터미널 정비	40,000	35,973	4,027	90.0%
			알뜰 교통카드 도입	25,212	897	24,315	3.6%
		철도경쟁력 강화		151,350	112,432	38,918	74.3%
			철도정책 사업	151,350	112,432	38,918	74.3%
	교통 안전 확보 및 편의 시설 제공			6,844,632	4,684,544	2,160,088	68.4%
		교통안전시설물 관리		6,844,632	4,684,544	2,160,088	68.4%
			주차장 조성 및 관리	1,055,013	947,451	107,562	89.8%
			어린이 보호구역 개선	672,450	402,336	270,114	59.8%
			교통안전표지판 설치 및 관리	606,000	472,364	132,736	78.1%
			교통신호기 설치 및 유지보수	1,488,164	1,025,409	462,755	68.9%
			과속방지턱 설치 및 차선도색	749,900	523,572	226,328	69.8%
			어린이 등하교 교통안전 지도	23,000	0	23,000	0%	코로나19 여파로 사업추진 연기
			동익산역 나룻가 가설철교 유지보수	625,105	464,629	160,476	74.3%
			교통시설 정비사업	1,600,000	822,883	777,117	51.4%
			교통신호기 설치 및 관리(보조)	25,000	25,000	0	100%

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
	재무활동			3,000,000	3,000,000	0	100%
		내부거래 지출		3,000,000	3,000,000	0	100%
			내부거래 지출	3,000,000	3,000,000	0	100%
	행정운영경비			50,393	50,393	0	100%
		기본경비		50,393	50,393	0	100%
			기본경비	50,393	50,393	0	100%
	교통 안전 확보 및 편의 시설 제공			5,000,000	1,912,715	3,087,285	38.3%	주차장 특별회계
		주차장 조성 및 관리		2,945,713	1,912,715	1,032,998	64.9%
			공영주차장 관리	561,713	269,785	291,928	48.0%
			공영주차장 조성(보조)	1,200,000	706,034	493,966	58.8%
			공영주차장 조성	984,000	766,896	217,104	77.9%
			개방주차장 지원	200,000	170,000	30,000	85.0%
		예비비		2,054,287	0	2,054,287	0%
			예비비	2,054,287	0	2,054,287	0%

2020 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 국제철도시대에 대비한 국제역(익산역) 구축전략 연구용역 추진 : 2019. 10. ~ 2020. 4

▸호남권역 중 경제적타당성(B/C) 가장 높음.

※ B/C분석 결과 : 익산역(4.88), 광주송정역(3.17), 목포역(0.80), 여수엑스포역(0.72)

◦ 교통 안전 시설물 확충으로 안전하고 편리한 교통체계 구축

▸교통안전시설물 설치 및 정비사업(유개승강장 설치 등 10개사업)	: 2,582백만원

- 교통신호제어기, 버스 유개승강장 신설, 노후차선도색 등

◦ 코로나19 대응 운수업계 지원(50만원/명)

▸택시·화물 운수종사자 안정 지원	: 3,225명(택시 1,478, 화물 1,747)

◦ 교통약자 및 교통 소외지역 서비스 개선

▸장애인 콜택시 확대 운행	: 24대 ⇒ 26대

▸행복 콜택시 확대 운행   : 27개마을 ⇒ 35개마을

▸행복 콜버스 확대 운행   : 2대(여산면) ⇒ 3대(오산면 1대 추가)

◦ 불법 주‧정차 행위 지속적 계도 및 단속으로 선진 교통질서 확립

▸어린이보호구역 내 주‧정차 질서 확립 : 단속확정 350건(26,770천원)

▸화물 자동차 불법 밤샘주차 단속 : 단속확정 34건(6,800천원)

◦ 주차환경 기본계획 및 주차수급실태 조사 용역 추진

▸동 지역 블록별 주차수급분석을 통한 연차별 주차환경개선계획 수립

◦ 도심권 공영주차장 확충

▸개방주차장 지원사업(이리남중교회 등 10개소)     : 985면

▸도심권 공영주차장 조성 (송학동외 4개소)         :   67면

▸노상주차장 조성(주현동, 모현동, 인화동)           : 147면

□ 반      성

◦ 도로교통법(민식이법) 개정시행에 따라 어린이 보호구역 무인교통

단속장비 및 신호등 설치 등 교통사고 예방조치 선제적 대응미흡

⇒ 제3회 추경 예산반영 추진(국도비보조사업 시비부담금 편성 협조 요청)

	□	국제(대륙)철도 거점도시 추진 익산시 대중교통 운영체계 개편 행복콜 택시 및 버스 확대 운영 교통약자를 위한 교통수단 확충 어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치사업 KTX 익산역 철도이용객 주차편의제공 주차환경개선사업 추진(공영주차장 확대) 주·정차 질서확립 강화 주·정차 과태료 징수강화 마을주민보호구역 교통안전시설 설치 교통시설물 설치 및 유지관리 버스유개승강장 교체 운수업계지원

2020 주요업무 추진상황

1		국제(대륙)철도 거점도시 추진

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : □제4차 국가철도망 구축계획□이 남북철도를 넘어 유라시아 대륙철도시대를 고려한 만큼 정부 추진방향에 선제대응 및 선점 필요

◦ 사업내용

▸국제역 및 국제화물철도역 구축을 위한 타당성 연구용역 추진

▸익산시 철도정책포럼 구성 및 운영

▸시민공감대 형성 및 역량결집, 거점역 선정 여건조성 등

□ 상반기 추진실적

◦ 국제철도시대에 대비한 국제역(익산역) 구축전략 연구용역  : 2019. 10. ~ 2020. 4

◦ 시민공감대 형성 및 국제철도 거점역 선정 기원 홍보

▸대륙철도 거점역 기원 익산역(서쪽복도) 홍보관 운영 : 2020. 1. ~

▸시내버스 승강장 홍보시트지 부착 홍보(총 69개소)   : 2020. 1. 28

▸대륙철도 거점역 선정 기원 홍보영상 송출

- 익산역 광장 앞 대형스크린 및 본청 로비 LED모니터 송출 : 2020. 4. 27

◦ 익산시 철도정책포럼 워크숍 추진	: 2020. 5. 8. ~ 5. 9

□ 하반기 추진계획

◦ 국제철도시대에 대비한 국제화물철도역 구축 타당성 연구용역 : 2020.  8

◦ 서동·국화 축제시 국제철도 거점역 기원 홍보부스 운영	: 2020.  9

◦ 익산시 철도정책포럼 정기회의 추진	: 2020. 10

- 분과별 연구과제 수행(3회추경 예산확보) 결과 논의 등

2		익산시 대중교통 운영체계 개편

□ 용 역 개 요

◦ 용역기간 : 2019. 6. ~ 2020. 10.

◦ 사 업 비 : 242백만원(주식회사 건화)

◦ 주요내용 : 지․간선 체계 구축 및 환승센터 구축 등

□ 상반기 추진실적

◦ 익산시 시내버스 노선개편 TF팀 구성(9명)	: 2020. 2. 20.

▸팀장 : 교통행정과장 / 팀원 : 8명(행정 2, 공관위 1, 용역사 2, 버스업체 3)

◦ 익산시 3개거점 중심 지·간선제 개편안 마련	: 2020. 2. ~ 5.

구분	간선	지선
함열권	시내 ↔ 함열	함열 ↔ 웅포, 성당, 용안, 용동, 망성, 낭산, 강경, 금마, 삼기
금마·여산권	시내 ↔ 금마 ↔ 여산	금마 ↔ 함열, 왕궁, 봉동, 삼례, 삼기
		여산 ↔ 왕궁, 강경, 함열

□ 하반기 추진계획

◦ 익산시 대중교통 운영체계 협의 TF팀 구성·운영	: 2020. 7. ~

▸참여대상 : 익산시 시내버스 사업자 및 운수종사자

◦ 익산시 시내버스 체계개편안 주민설명회	: 2020. 7. ~ 10.

※ 코로나19 확산세를 고려하여 읍·면 일정 협의

3		행복콜 택시 및 버스 확대 운영

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 600백만원 (균 300, 도 40, 시 260)

▸콜택시 운영비 : 200백만원 (인건비 등)

▸콜버스 도입비 :  75백만원 (소형승합 1대)

▸콜버스 운영비 : 325백만원 (인건비 등)

◦ 주요내용

▸행복콜 택시 : 11대 / 함열읍 대지마을 등 35개 마을

▸행복콜 버스 :  3대 / 기존 2대(여산면), 신규 1대(오산면)

□ 상반기 추진실적

◦ 행복콜 택시 확대 운행 개시	: 2020. 1

▸기존 27개 마을 ⇒ 35개 마을로 확대 운행(6개 마을*은 1일 운영횟수 2회로 증회)

*6개 마을 : 인화동 신천, 황등면 소산, 금마면 각봉 동편 구룡 황각

◦ 행복콜버스 추가 운행 개시(오산면)	: 2020. 5. 6

□ 하반기 추진계획

◦ 행복콜 택시 확대 운행(35개소 → 46개소)          : 2020. 7. 1~

▸11개 마을 : 함열읍 와야, 황등면 구자·황교1, 낭산면 상낭·외성

왕궁면 호음·평리, 망성면 상포·교항·포변, 팔봉동 용연

4		교통약자를 위한 교통수단 확충

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,444백만원 (국 225 기 257 도 154 시 808)

▸저상버스 도입비 : 367백만원 (국 183 도 92 시 92)

▸저상버스 운영비 : 135백만원 (도 41 시 94)

▸장애인콜택시 도입비 : 84백만원 (국 42 도 21 시 21)

▸장애인콜택시 운영비 : 858백만원 (기 257 시 601)

◦ 현    황

▸저상버스 : 27대 (총목표대수 : 53대, 2020년 목표대수 : 30대)

- 확보기준 : 총 운행대수(161대)의 30%

▸장애인콜택시 : 26대 (목표도입대수 : 40대, 2020 목표대수 28대)

- 장애의 정도가 심한 보행상 장애인 150명당 1대 (8,128명, 5월말기준)

□ 상반기 추진실적

◦ 임차택시 5대 도입	: 2020. 4.  1

◦ 저상버스 대폐차 1대	: 2020. 4. 24

◦ 장애인콜택시 2대 구입	: 2020. 6.  2

□ 하반기 추진계획

◦ 저상버스 도입 지원 (3대)                         : 2020.  11

5		어린이보호구역 무인교통단속장비등 설치사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 12.(3개년)

◦ 총사업비 : 4,506백만원

◦ 위    치 : 익산시 관내 어린이보호구역

◦ 사 업 량 : 무인교통단속장비 41개소 77대, 교통신호기 12개소

※ 2020년 사업 계획

▸사업비 : 1,967백만원(국비 860, 도비 200, 시비 907)

▸사업량 : 무인교통단속장비 25대, 교통신호기 12개소

□ 상반기 추진실적

◦ 어린이보호구역 교통안전시설물 현황조사 제출     : 2020. 1. 29.

◦ 국비 및 도비 보조금 교부결정 및 송금(3회)       : 2020. 4, 5, 6월

▸확보 사업비 : 1,060백만원(국비 860, 도비 200)

◦ 전라북도지방경찰청 설치 협의(5개소 10대)        : 2020. 5. 25.

▸송학초, 부천초, 동남초, 어양초, 옥야초

◦ 무인교통단속장비 설치 행정예고                  : 2020. 6. 2.

□ 하반기 추진계획

◦ 제3회 추경 시비 부담금(907백만원) 확보	: 2020. 7.

◦ 설계 및 계약심사                                : 2020. 7.

◦ 착공 및 준공                                    : 2020. 8. ~ 12.

6		KTX익산역 철도이용객 주차편의 제공

□ 사 업 개 요

◦ 역골지구 주차공원 조성사업

▸사업기간 : 2019. 12월 ~2021년  /  ▸사 업 비 : 1,960백만원

▸사업내용 : 송학동 역골지구 도시주거환경정비구역 내 도시계획시설(완충녹지 → 주차장) 변경 후 주차장 조성(150면)

◦ 철도이용객 주차편의 증진을 위한 대리주차서비스 시행(남부‧송학공영주차장)

□ 상반기 추진실적

【역골지구 주차공원 조성사업】

◦ 역골지구 정비계획변경 및 지구단위계획수립용역	: 2019.12월~2020. 8월

▸주민설명회 개최(2020. 6. 11) 및 자산관리공사 등 관계 기관 협의 중

◦ 사업지구 감정평가 및 협의매수 추진	: 2020. 4월~

▸사유지 10필지 중 8개 필지 매입 / 세입자 이주보상 7명 중 2명 보상

【대리주차(픽업)서비스 시행】

◦ 이용실적(시행일 : 2020. 2. 1 / 송학공영주차장 조성 : 2020. 5. 9)

구분	2월	3월	4월	5월	6월	비 고
1,304대	57대	3대	209대	546대	489대	5~6월기준 1일평균 16.9대 픽업서비스 중단(2020. 5. 2) 코로나19 완화 이후 지속증가

※ 대리주차서비스 이용고객 만족도 84%(상반기 전화조사 결과)

※ 송학공영주차장 이용객 증가(5월 609대 / 6월 769대)

□ 하반기 추진계획

【역골지구 주차공원 조성사업】

◦ 도시계획시설 주차장 변경 및 실시계획인가 추진	: 2020. 8~12월

▸사업인정고시 병행으로 잔여부지 협의매수 및 수용 추진

▸사업부지 내 임시주차장 조성(2020. 8월 예정 / 50면 정도)

【대리주차서비스 시행】

◦ 대리주차서비스 홍보 및 모니터링 지속 추진

7		주차환경개선사업 추진(공영주차장 확대)

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019~2024년(계속)  /  ◦사업규모 : 25개 사업 2,525면

◦ 예 산 액 : 52,290백만원(국비 10,500 / 시비 41,790)

◦ 사업내용 및 추진방향

▸주차환경개선 기본계획 수립 및 주차수급실태조사용역

▸블록별 주차난 해소 정책 추진

▸도심권 소규모 공영주차장 조성 및 개방주차장 지원사업

▸차선조정을 통한 노상주차장 조성 및 교통흐름 개선을 위한 일방통행 지정 등

□ 상반기 추진실적

【블록별 주차장 조성(확대)】

◦ 주차환경개선기본계획 수립 및 주차수급실태조사용역 준공	: 2020. 6월

◦ 도심권 공영주차장 5개소 67면 조성(송학‧남중‧중앙‧모현‧영등동)	: 2020. 5월

◦ 차선 및 인도폭 조정을 통한 노상주차장(147면) 조성	: 2020. 5월

▸마동사거리(100면) 및 모현동행정복지센터 맞은편(10면), 인화동2가 111번지(37면)

【개방주차장 지원사업】

◦ 종교시설 등 부설주차장 무료개방(기쁨의교회 등 10개소 985면)	: 2020. 6월

□ 하반기 추진계획

【블록별 주차장 조성(확대)】

◦ 도심권 소규모 공영주차장 조성(추가)	: 2020. 8월~2021. 5월

▸주차장 부지 공모‧조사(8월), 협의매수(9~10월), 실시설계‧조성(‘20.11~‘21.5월)

◦ 노상주차장 조성(430면 / 실시설계용역 및 공사)	: 2020. 8~12월

▸영등동CGV‧마동주공A 도로변, 고봉로23길(롯데마트), 궁동로(부송공원) 등

▸영등공영주차장 주차타워 조성 주민간담회 및 실시설계용역 추진

▸약촌교차로 근린공원 노상주차장 조성을 위한 도시계획시설 변경

【개방주차장 지원사업】

◦ 개방주차장 지원사업(4~8개소 추진)	: 2020. 8~12월

【일방통행 지정】

◦ 대학로‧영등2동 먹자골목의 일방통행 지정 주민간담회 실시	: 2020. 8월

8		주․정차 질서확립 강화

□ 사 업 개 요

◦ 단 속 구 역 : 155개 노선 122.72km

◦ 단 속 인 력 : 6명(단속 공무원 5, CCTV 관제센터 1명)

◦ 단속 카메라 : 84대(무인단속 CCTV 79, 이동식단속차량 3, 디지털카메라 2)

□ 상반기 추진실적

◦불법 주․정차 무인단속 CCTV 신규 설치 : 12대

▸모현동 모현초등학교 사거리, 영등동 연희빌딩 인근 : 2대

▸모현동 익산역 서편주차장 ~ 모현 이편한 세상 사거리 : 2대

▸마동 등기소 ~ 마동 행정복지센터 사거리  : 3대

▸오산면 장신 휴먼시아 1단지 홀짝구간      : 1대

▸동산동 : 수도산코아루이지움(1대)

▸어양동 : 어양3차오투그란데(1대), 어양센트럴파크(2대)

◦ 불법 주․정차 무인단속 CCTV 성능개선 : 4대

▸중앙동 대한기계, 영등동 파머스마켓, 영등동 CGV,

부송동 백제웨딩문화원

◦ 불법 주정차 단속 문자 알림서비스 실시 : 2016. 12. 12.부터 시행

▸2020. 6. 23.현재 신청 인원  - 67,288명(가입률 48.7%)

◦ 불법 주·정차 단속(이동식 단속차량 및 CCTV)  : 28,143건

◦ 어린이보호구역내 불법 주·정차 단속 : 350건(26,770천원)

◦ 화물자동차 불법 밤샘 주차단속 : 34건(6,800천원)

□ 하반기 추진계획

◦ 불법 주·정차 단속 및 민원 처리

▸단속·민원 처리 : 3개반(2인 1조) / 무인단속 CCTV 운영 : 79대

◦ 어린이보호구역내 불법 주·정차 단속

▸단속반 운영 : 3개반 9명, 순찰차량 3대

◦ 화물자동차 불법 밤샘 주차단속

▸단속반 운영 : 연중, 3개반(2인1조), 순찰차량 1대

9		주 ․정차 과태료 징수강화

□ 사 업 개 요

◦ 주․정차위반 과태료 징수현황 (2020. 6. 30.기준)        (단위:건/천원)

구분 세목	부 과		징 수		체 납		징수율 (%)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2020년	28,143	845,621	23,189	672,401	4,954	173,220	79.5

□ 상반기 추진실적

◦ 자진납부 안내문 및 체납고지서 발송 : 31,990건/459,479천원

▸과태료 자진납부 안내문 발송  : 10,290건

▸과태료 체납고지서 발송       : 27,700건

◦ 과태료 체납에 따른 차량 압류 실시  :  3,728건/157,090천원

□ 하반기 추진계획

◦ 신규발생 부과분에 대한 정확한 송달 및 자진납부 독려

◦ 징수과와 지속적인 협업으로 체납과태료 징수 제고

◦ 과태료 체납시 차량 압류로 과태료 징수 제고

10		마을주민보호구역 교통안전시설 설치

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2020. 9.

◦ 총사업비 : 1,300백만원(도비 650, 시비 650)

▸2019년 추경 2차 예산 : 800백만원(도비 400, 시비 400)

▸2020년 본예산 : 500백만원(도비 250, 시비 250)

◦ 위    치 : 4개소

※ 2019년 하반기 사업선정

▸춘포면 궁월·화평마을 인근(L=1.2km)

▸월성동 삼성·각동마을 인근(L=2.5km)

▸삼기면 궁교·대제마을 인근(L=1.7km)

※ 2020년 상반기 사업선정

▸금마면 도천·황각·외산마을 인근(L=3.5km)

◦ 사업내용 : 통합표지판, 차선정비, 노면표시 및 미끄럼방지, 과속단속장비, 과속방지턱 설치 및 도로포장 등

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계 용역 완료	: 2020. 5. 18

◦ 설계심의 및 계약심사 완료	: 2020. 5. 21.∼6. 10

◦ 공사계약 및 착공                          : 2020. 6. 9.∼6. 23

□ 하반기 추진계획

◦ 공사준공(4개소)	: 2020.  9

11		교통시설물 설치 및 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 총 사업비	10개사업 3,029백만원

▸시내버스 유개승강장 유지관리	:	50백만원
▸탄소융복합제품 공동구매 지원(발열의자)	:	50백만원
▸교통신호기 설치 및 제어기 교체 등	:	320백만원
▸안전속도 5030 설치 및 관리	:	200백만원
▸경보, 경광등, 횡단보도조명등 설치 및 교체	:	307백만원
▸교통신호기 유지관리 단가계약	:	450백만원
▸무인단속카메라 설치	:	200백만원
▸교통안전 표지판 및 반사경 유지관리	:	403백만원
▸과속방지턱 설치 및 노후차선도색 정비사업	:	749백만원
▸교통안전시설 정비 및 생활권 이면도로정비	:	300백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 공사완료	10개사업 2,582백만원

▸시내버스 유개승강장 유지관리(14개소)	:	50백만원(100%)
▸탄소융복합제품 공동구매 지원(발열의자)(20개소)	:	50백만원(100%)
▸교통신호기 설치 및 제어기 교체 등(12개소)	:	282백만원(88%)
▸안전속도 5030 설치 및 관리(120개소)	:	189백만원(95%)
▸경보, 경광등, 횡단보도조명등 설치 및 교체(65개소)	:	271백만원(88%)
▸교통신호기 유지관리 단가계약(224개소)	:	327백만원(73%)
▸무인단속카메라 설치(4개소)	:	153백만원(77%)
▸교통안전 표지판 및 반사경 유지관리(550개소)	:	343백만원(85%)
▸과속방지턱 설치 및 노후차선도색 정비사업(51개소, 50km)	:	654백만원(87%)
▸교통안전시설 정비 및 생활권 이면도로정비(6개소)	:	263백만원(88%)

□ 하반기 추진계획

◦ 교통안전 시설물 정비 및 공사 준공                 :    2020. 12

12		버스 유개승강장 교체

□ 사 업 개 요

◦ 버스 유개승강장 교체	: 200백만원

▸버스 유개승강장 현황

(2020. 6.  30)

구분	소계	일반형	스텐형	FRP형	벽돌형	도시형	농촌형	기타	비고
합계	831	295	21	33	135	236	90	21
읍·면	546	196	5	10	132	109	76	18
동	285	99	16	23	3	127	14	3

□ 상반기 추진실적

◦ 유개승강장 교체 및 신설

▸교체 10개소(일반형 2, 스텐형 3, 벽돌형 5), 신설 2개소

▸함라면 장점마을 승강장 외 11개소(동지역 4개소, 면지역 8개소)

□ 하반기 추진계획

◦ 유개승강장 교체 및 신설	: 2020. 8

▸모현동 부영1차아파트 승강장 외 7개소

13		운수업계 지원

□ 사 업 개 요

◦ 현    황                                             (단위 : 백만원)

구 분	차량대수	사업명	2020년 예산				비고
			계	국비	도비	시비
계
			37,593	-	2,316	35,277
시내버스	164대	재정지원	12,458	-	1,258	11,200
		벽지노선손실보상	1,280	-	-	1,280
		무료환승손실보전	2,420	-	-	2,420
		노후차량교체지원	380	-	-	380	19대
택 시	1,414대	카드수수료	346	-	104	242	전액 지원
		통신비	95	-	28	67
		코로나19에 따른 택시· 화물 운수종사자 지원	752	-	301	451	도비 성립전 지급 시비 재난관리기금
화 물	3,310대		1,562	-	625	937
		유가보조금	18,300	-	-	18,300	버스·택시 포함

◦ 지급기준

▸재정지원 : 3개업체 107개 노선 운영적자 일부 지원(분기초 지급)

▸벽지노선손실보상 : 47개(도지정 25, 시지정22) 벽지노선(분기별 지급)

▸무료환승손실보전 : 일반 1,350원, 중·고생 1,050원, 초등생 650원(매월지급)

▸노후차량교체지원 : 대당 20백만원 정액지원(차량 교체시 지급)

▸코로나19에 따른 택시·화물 운수종사자 지원 : 1명당 500천원 정액지원

▸택시 : 카드수수료(전액지원/매월), 통신료(대당 5,500원/매월)

▸유가보조금 : 버스(경유 380.09원/ℓ, CNG 63.29원/N㎥), 택시(LPG 197.97원 /N㎥), 화물(345.54원/ℓ)

□ 상반기 추진실적                          2020.6.30/백만원

구 분	사 업 명	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	비고
계		22,073	4,719	2,108	4,914	2,024	4,776	3,532
시내버스	재정지원	9,793	3,115	450	3,114	-	3,114	-
	무료환승손실보전	853	88	173	147	139	146	160
	벽지노선손실보상	310	-	-	-	310	-	-
	노후차량교체지원	140	-	-	40	40	20	40
택 시	카드수수료	199	51	11	40	30	14	53
	통신비	43	9	8	8	8	8	2
	코로나19에 따른 택시· 화물 운수종사자 지원	739						739
화 물		1,061						1,061
유가보조금	시내버스	350	61	60	60	57	57	55
	택시	1,065	208	195	167	158	166	171
	화물	7,520	1,187	1,211	1,338	1,282	1,251	1,251