2020.  7.

제228회 익산시의회(임시회)

― 2020 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예산집행실적
□	2020 상반기 성과 및 반성
□	2020 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	20		1	4	9	4	2
현 원	21		1	7	9	3	1
증 감	1		-	3	-	△1	△1

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	건설과 소관 용지매입, 토지수용 재결, 소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등, 사업관련 협의, 시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업 추진
	◦	하천시설	:	하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업
	◦	하천관리	:	하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과, 생태하천관리
	◦	가로등관리	:	가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	154.779	168.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	28.169	74.034	27%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
480	408	55	17	243,375	225,941	11,263	6,171

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
29,290등	19,489등	9,801등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2020 예산집행실적

【 2020. 6. 15. 현재 】                                     (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				46,920,700	8,184,919	38,735,781	17.4
	도로시설관리			20,905,530	3,503,697	17,401,833	16.8
		시군농어촌도로확포장공사		15,096,585	1,803,262	13,293,323	11.9
			금마갈산~서편간도로 확포장공사	656,165	234,624	421,541	35.8	명시이월
			망성신성~관산간 도로확포장사업	467,076	122,221	344,855	26.2	명시이월 사고이월
			오산장신~만석간 도로확포장공사	3,978	1,400	2,578	35.2	명시이월
			왕궁온수~시대간 (황암~상발) 도로확포장공사	284,394	35,532	248,862	12.5	사고이월
			촌포토다리~덕동간 도로확포장공사	701,262	154,828	546,434	22.1	명시이월 사고이월
			미불용지매입비 (시군도농어촌도로)	100,000	81,987	18,013	81.9
			왕궁군도26호선 도로확포장공사	213,632	19,067	194,565	8.9	명시이월
			용안창리법성간 도로확포장공사	846,918	510,958	335,960	60.3	명시이월 사고이월
			함라칠성~다은간 도로확포장공사	198,843	101,487	97,356	51.0	명시이월 사고이월
			망성군도10호금지간 도로확포장공사	359,621	167,824	191,797	46.7	명시이월 사고이월
			금마누동~신촌간 도로확포장공사	319,409	7,206	312,203	2.3	명시이월 사고이월
			시군농어촌도로 확포장사업추진	15,598	2,420	13,178	15.5	명시이월
			군도23호선 도로확포장공사	5,802,888	64,655	5,738,233	1.2	명시이월 사고이월
			시군도도로관리계획및농어촌기본계획용역	117,920	0	117,920	0	명시이월
			어양동어곳~부평간 도로확포장공사	371,131	0	371,131	0	명시이월 사고이월
			오산면소재지진입도로 (군도2호)확포장공사	1,025,670	0	1,025,670	0	명시이월 사고이월
			오산제일교회~정각사간 확포장공사	569,772	244,046	325,726	42.8	명시이월 사고이월
			황등도선~외화간 도로확포장공사	334,200	2,904	331,296	0.9	명시이월 사고이월
			오산역~상아마을간 병목구간도로확포장공사	182,160	4,627	177,533	2.5	명시이월
			하나로~소간촌간 도로확포장공사	567,009	0	567,009	0	명시이월 사고이월
			왕궁 양동마을 진입도로확포장공사	352,956	16,108	336,848	4.6	명시이월 사고이월
			춘포창평마을진입도로 확포장공사	100,000	0	100,000	0	명시이월
			왕궁금오동~군도22호간 도로확포장공사	259,598	0	259,598	0	명시이월
			금마신정~증왕간 도로확포장공사	535,577	0	535,577	0	명시이월 사고이월
			춘포오룡선 도로확포장공사	110,808	31,368	79,440	28.3	명시이월
			황등면 하동마을~동연지하차도 우회도로개설공사	500,000	0	500,000	0	명시이월
			춘포노적선 도로확포장공사	100,000	0	100,000	0
		도로조명시설관리		2,729,350	1,544,099	1,185,251	56.6
			보안등신규설치	228,000	159,142	68,858	69.8
			노후가로등정비	764,700	469,373	295,327	61.4
			가로등보안등 유지관리	1,644,610	837,436	807,174	50.9
			가로등보수차량 운영유지비	16,040	8,000	8,040	49.9
			보안등신규설치 (보조)	76,000	70,148	5,852	92.3
		주민숙원사업		34,600	17,302	17,298	50.0
			주민숙원사업	34,600	17,302	17,298	50.0
		철도건널목개량사업		305,122	45,403	259,719	14.9
			평화육교재가설	305,122	45,403	259,719	14.9	사고이월
		교통관리개선사업		1,239,873	62,629	1,177,244	5.1
			용안난포삼거리 위험도로 구조개선	373,873	45,928	327,945	12.3	사고이월
			왕궁신호~용남 위험도로 구조개선	486,000	16,701	469,299	3.4	명시이월
			낭산~시영선형개량사업	100,000	0	100,000	0
			신왕교차로 회전 교차로설치사업	280,000	0	280,000	0
		지방도 도로확포장		1,500,000	31,002	1,467,998	2.1
			하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	1,500,000	31,002	1,467,998	2.1
	하천정비			25,899,636	4,640,538	21,259,098	17.9
		하천정비및유지관리		25,899,636	4,640,538	21,259,098	17.9
			하천제방유지보수	300,150	139,101	161,049	46.3	명시이월
			하천제방유지보수(자체)	2,263,001	564,126	1,698,875	24.9	명시이월
			국가하천유지관리 (4대강)	355,000	56,486	298,514	15.9
			지방하천정비 (왕궁천)	14,778,813	2,676,621	12,102,192	18.1	계속비이월
			지방하천정비 (동면천)	5,555,961	9,552	5,546,409	0.2	계속비이월
			만경강물문학관 진입도로개설공사	694,500	628,875	65,625	90.6	명시이월
			국가하천유지보수(4대강외)	168,000	49,016	118,984	29.2
			소하천정비 (동산천)	1,142,798	470,674	672,124	41.2	명시이월
			소하천정비 (닭작골천)	641,413	46,087	595,326	7.2	명시이월
	행정운영경비(건설과)			115,534	40,684	74,850	35.2
		인력운영비		81,492	19,584	61,908	2.4
			국가하천유지보수 (인력운영비)	40,000	19,584	20,416	48.9
			용안생태습지 (인력운영비)	41,492	0	41,492	0
		기본경비		34,042	21,100	12,942	61.9
			기본경비	34,042	21,100	12,942	61.9

2020 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 농어촌도로 확포장을 통한 통행 불편 해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민 편익 증대

‣공사 완료사업 : 2개소

-함라 칠성~다은간 도로확포장공사(L=1.0㎞, B=8.0m)	: 2020.  5. 18.

-용안 창리~법성간 도로확포장공사(L=0.84㎞, B=6.0m)	: 2020.  6. 22.

‣공사 착공사업 : 2개소

- 춘포 토다리~덕동간 도로확포장공사 (L=1.0㎞, B=8.0m)

- 황등 도선~외화간 도로확포장공사 (L=0.7㎞, B=8.0m)

◦ 교통사고 위험지역 위험도로 구조개선 (회전교차로 설치 및 선형개량)

‣공사 완료–용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업	: 2020.  6. 29.

‣실시설계 신규 – 낭산농협~시명마을간 위험도로 구조개선 외 1개소

◦ 평화육교 재가설을 통한 안전성 확보와 KTX호남고속철도의 안전한 교통망 구축

‣대체우회도로 설치(L=1.1km, 4차로), 평화육교 철거

※ 전체 공정율 61.0% (20년 6월말 기준)

◦ 만경강 문화관 보상금 공탁 및 소유권이전 완료	: 2020.  3.

‣공탁(토지 2필지, 지장물 보상비 및 영업보상비)

‣상반기 629백만원 지출(총 보상비 1,350백만원 중 1,302백만원 지출)

‣(목천동 1183-37 고**, 1183-40 문**)2가구에 대한 이사비 등 미지출

□ 반      성

◦ 행정절차 진행 정도에 따라 예산확보 추진해야 하는데 예산확보 후 사업추진으로 이월예산 발생

◦ 앞으로 행정절차 진행 정도에 따라 예산확보 후 사업추진 하겠음

2020 주요업무 추진상황

		시･군도 및 농어촌도로 확·포장 군도23호선 도로확·포장 평화육교 재가설 사업 왕궁천 하천 환경 정비사업 동면천 하천 환경 정비사업 소하천 정비사업(동산천.닭작골천) 만경강 문화관 조성사업 도로조명개선

1		시･군도 및 농어촌도로 확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산, 용동, 망성, 용안, 금마, 왕궁, 삼기, 함라, 춘포, 낭산, 황등, 어양동, 부송동 일원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년

◦ 사업규모 : L= 26.66km, B= 6.5~24.0m

◦ 총사업비 : 31개사업  47,101백만원 (본예산 1,930)

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계 발주 및 추진 4개소	: 2020.  1.~ 6.

▸낭산농협~시명마을간 선형개량 외 3개소

◦ 실시설계용역 추진 6개소	: 2020.  1.~ 6.

▸왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업 외 5개소

◦ 행정절차 및 보상 10개소	: 2020.  1.~ 6.

▸왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사 외 9개소

◦ 공사발주 및 착공 2개소	: 2020.  6.

▸춘포 토다리~덕동간 도로 확포장 외 1개소

◦ 공사중 6개소	: 2020.  1.~ 6.

▸망성 신성~관산간 도로확포장 외 5개소

◦ 공사완료 3개소	: 2020.  6.

▸용안 창리~법성간 도로확포장 외 2개소

□ 하반기 추진계획

◦ 실시설계용역 추진 10개소	: 2020.  7.~12.

▸왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업 외 9개소

◦ 행정절차 및 보상 10개소	: 2020.  7.~12.

▸왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사 외 9개소

◦ 공사 추진 5개소	: 2020.  7.~12.

▸춘포 토다리~덕동간 도로확포장 외 4개소

◦ 공사완료 3개소	: 2020. 12.

▸망성 군도10호~금지간 도로확포장 외 2개소

시ㆍ군도 및 농어촌도로 사업추진현황 (계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2020년 예산액	금후 투자
	31개사업	L=26.66km B=6.5-24m	47,101	16,005	1,930	29,166
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,248	1,198	50		공사중 95%	망성 303 (신선선)
2	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	1,480	1,250	230		준공	용안 203 (자석선)
3	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	825	825			준공	함라 201 (진다선)
4	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,055	1,055			공사중 95%	망성 102 (수용선)
5	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	800	580		220	공사중 45%	금마 102 (누부선)
6	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	616		2,187	보상	군도 21호
7	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,920	877		1,043	착공	춘포 103 (신화선)
8	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m	3,100	950	300	1,850	보상	시도 1268
9	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,500	600		900	설계중	금마 202 (서오선)
10	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,000	400		600	착공	황등 104 (황팔선)
11	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	870	700	170		공사중 74%	오산 203 (신수선)
12	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m	1,221	700		521	공사중 40%	왕궁 207 (양곡선)
13	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,400	600		800	설계중	삼기 203 (석라선)
14	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=24.0m	5,000	600	500	3,900	행정절차	군도2호
15	오산역 –상아마을간 도로확포장공사	L=0.2km B=8.0m	200	200			보상	오산 203 (신수선)
16	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	L=0.7km B=8.0m	1,500	100		1,400	설계중	춘포 308 (창평선)
17	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	797		2,173	설계중	왕궁 210 (신기선)
18	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	779	200	1,850	보상	금마 101 (서삼선)
19	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	위험도로 구조개선 1식	700	700			준공	지방도706 용안201	특교 700

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2020년 예산액	금후 투자
20	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	정비계획 1식	160	160			설계중
21	왕궁 금오동~군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300		700	행정절차	왕궁 102 (농장선)
22	춘포 오룡선 도로확.포장	L=0.5km B=8.0m	1,000	130		870	설계중	춘포 102 (오룡선)
23	황등 하동마을~ 동연지하차도간 도로확포장사업	L=0.6km B=8.0m	1,250	650		600	설계중	농어촌 도로
24	왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업	L=0.5km B=8.0m	486	80		406	설계중	군도19호	국고
25	춘포 노적선 도로확포장	L=0.4km B=8.0m	700		100	600	설계중	여산304 (금평선)
26	낭산-시영 선형개량사업	L=0.4km B=8.0m	1,000		100	900	설계중	군도9호선	국고
27	신왕교차로 회전교차로설치	회전교차로 1식	280		280		공사	지방도723 시도68호	국고
28	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
29	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
30	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
31	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)

2		군도23호선 도로확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기 일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 4.

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=20.5m (2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 12,500백만원(공사비 9,000 보상비 3,100 기타 400)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기 투자	2020년	2021년 이후	비고
시비	12,500	11,500	1,000	-

□ 상반기 추진실적

◦ 1차분 공사 추진	: 2020. 1.~ 6.

◦ 1차분 공사 완료	: 2020. 6. 10.

◦ 2차분 공사 계약	: 2020. 6. 26.

□ 하반기 추진계획

◦ 2차분 공사 추진	: 2020.7.~2021.4.

◦ 공사 준공	: 2021. 4.

3		평화육교 재가설 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2021. 6.

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m(4차로 ⇒ 6차로)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

◦ 총사업비 : 49,700백만원(국비 30,700  시비 19,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년이후	비고
계	49,700	45,705	2.100	1,895
국 비	30,700	28,600	2,100	0
시 비	19,000	17,105	0	1,895

□ 상반기 추진실적

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2020. 1.~ 6.

▸농업용수로 이설, 접속 램프 및 교량 재가설

▸공정율 : 61%(20년 6월말 기준)

□ 하반기 추진계획

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2020.7.~2021.6.

◦ 공사 준공	: 2021. 6.

4		왕궁천 하천 환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리(보석박물관)~춘포면 천동리(익산천 합류점)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 47,368백만원(설계 827, 공사 37,754, 감리 2,265, 보상 5,000, 기타 1,522)

(단위 : ㎞, 백만원)

구 분	위 치	연장	사업비	내용
	합 계	9.25	47,368	축제, 보축, 교량재가설(9)
1지구	익산천 합류점 ~ 흥암교	4.62	23,693	축제, 보축, 교량재가설(5)
2지구	흥암교 ~ 보석박물관	4.63	23,675	축제, 보축, 교량재가설(4)

□ 상반기 추진실적

◦ 왕궁천(1지구) 공사추진

▸발산보, 세절보 Con’c타설 완료, 흥암교 가교 설치 완료

▸발산2교, 평리교, 흥암1교 교량 설치(공정율 90%)

▸전체 공정율(1지구) : 38%

◦ 왕궁천(1지구) 기성검사	: 2020.  5. 20.

◦ 왕궁천(2지구) 건설사업관리용역 착수	: 2020.  2. 14.

◦ 왕궁천(2지구) 공사 착수	: 2020.  3.  3.

□ 하반기 추진계획

◦ 왕궁천(1지구) 건설사업관리용역(2차분) 시행	: 2020.  7. 19.

◦ 왕궁천(1지구) 왕궁천 2차분 공사준공 및 3차분 추진: 2020. 11. 24.

◦ 왕궁천(2지구) 왕궁천 1차분 공사준공 및 2차분 추진	: 2020.  7. 19.

◦ 왕궁천(2지구) 건설사업관리용역(2차분) 시행	: 2020. 10. 31.

◦ 토지보상수용 재결 신청	: 2020. 11. 30.

5		동면천 하천 환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2023년

◦ 사 업 비 : 15,489백만원(설계 800, 보상 1,000, 공사 13,000, 감리 200, 기타 489)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km

▸제방축조 및 보축, 교량 재가설(7개소) 등

□ 상반기 추진실적

○ 설계경제성 검토 용역 준공	: 2020.  2. 14.

○ 수질오염총량 협의	: 2020.  3.  3.

○ 소규모 환경영향평가 협의	: 2020.  6. 15.

○ 생산기반시설 대체시설 설치 협의	: 2020.  6. 17.

□ 하반기 추진계획

○ 관계기관 및 부서 협의	: 2020.  7.

○ 경계분할측량 의뢰	: 2020.  7.

○ 실시설계 협의(2차, 전북도)	: 2020.  7.

○ 감정평가 의뢰	: 2020.  8.

○ 건설기술심의(2전북도)	: 2020.  9.

○ 보상계획 열람공고	: 2020.  9.

6		소하천 정비사업(동산천, 닭작골천)

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
동산천 소하천정비공사	웅포면 맹산리 일원	2018. ~ 2021.	3,210 (2020년 지방이양) ▸2020년 : 905	소하천정비 L=1.018km
닭작골천 소하천정비공사	여산면 여산리 일원	2019. ~ 2022.	3,902 (2020년 지방이양) ▸2020년 : 372	소하천정비 L=1.4km

□ 상반기 추진실적

【 동산천 】

◦ 동산천(1차분) 준공(19.12.착공)	: 2020.  4.  2.

◦ 동산천(2차분) 착공	: 2020.  4.  3.

【 닭작골천 】

◦ 경관/ 공공디자인 심의(자체)	: 2020.  1.

◦ 실시설계 사전설계검토 요청(전북도)	: 2020.  4.

◦ 지적분할측량	: 2020.  5.

□ 하반기 추진계획

【 동산천 】

◦ 동산천 준공(2차분) 및 착공(3차분)	: 2020.  8.

◦ 동산천 총차분 준공	: 2021.  2.

7		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 11,350백만원(국비 10,000 시비 1,350 토지매입비)

◦ 사업내용 : 13,814㎡[지하 1층, 지상2층/연면적 1,686㎡]

◦ 시설현황 : 다목적실, 로비, 사무실, 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강 신탁지구 하천정비사업에 포함)

□ 상반기 추진실적

◦ 토지수용 재결에 따른 보상금 공탁 및 소유권이전 완료	: 2020.  3.

▸공탁(토지 2필지, 지장물 보상비 및 영업보상비)

▸상반기 629백만원 지출(2020. 6. 기준 총 보상비 1,350백만원 중 1,302백만원 지출)

▸2가구에 대한 이사비 등 미지출(목천동 1183-37 고**, 1183-40 문**)

◦ 건축 및 토목 등 공사 추진(익산지방국토관리청)	: 2019.12.~2021.6.

▸시공회사 : 고려종합건설(주) / 감리사 ; ㈜삼안

□ 하반기 추진계획

◦ 건축 및 토목 등 공사 추진(익산지방국토관리청)	: 2019.12.~2021.6.

◦ 건축물 내 콘텐츠관련 발주(익산지방국토관리청)	: 2020. 7.~

◦ 만경강문화관 관리·운영(익산시)	: 2021. 7.~

8		도로조명 개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사업예산 : 989백만원

◦ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행 불편지역 도로조명 보수 및 설치

(단위 : 백만원)

구 분	세 부 사 업	사 업 개 요	예 산	비고
합 계		13개 사업	989
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업(견문보고)	보안등 신규설치 92개소	98
	생활환경개선사업(소규모 주민숙원 사업)	보안등 신규설치 104개소	118
	왕궁유적전시관 인근 보안등 설치	보안등 신규설치 10개소	10
노 후 가 로 등 정 비	도심지역 가로등 유지보수	고장 가로등 정비 120개소	120
	산업단지 가로등 유지보수	가로등 보수 60개소	60
	가로등 노후 점멸기 교체공사	노후 점멸기 교체 5개소	23
	읍 면 지역 보안등 보수	읍 면지역 고장 보안등 수리	120
	동 지역 보안등 보수	동 지역 고장 보안등 수리	78
	노후 보안등 기구 교체	노후 보안등 기구 교체	42
	전기안전점검부적합보수단가	점검부적합보수 300개소	30
	도심지역노후가로등교체공사	노후 가로등 정비 1식	100
	노후가로등LED교체공사	LED등기구 교체 1식	100
	산업단지 조도 개선공사	램프(안정기)교체 1식	90

□ 상반기 추진실적

◦ 사업추진 : 660백만원(집행률 66.7%)

▸보안등 신규설치공사 3개사업(167백만원)

▸노후가로등 정비공사 10개사업(493백만원)

□ 하반기 추진계획

◦ 보안등 신규설치 공사 추진	: 2020.  7.~12.

◦ 노후가로등 정비공사 잔여사업 추진	: 2020.  7.~12.