2020. 7.

제228회 익산시의회(임시회)

― 2020 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예 산 집 행 실 적
□	2020 상반기 성과 및 반성
□	2020 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전 정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지 조성

일  반  현  황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	6	6	7	5
현 원	25	1	8	7	4	5
증 감			2	1	▵3

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2019. 12.	비 고
시설	총인구	천명	288
	하수인구	천명	270
	보급률	%	93.8
하수처리	1일평균하수발생량	톤	115,602
	1일평균하수처리량	톤	112,836
	하수처리율	%	97.61
하수도 사용	개소수	전	40,180
	톤당 평균요금	원	737.22

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	29	150,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	관리대행 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	〃
제3일반산업단지 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	〃

2020 예산집행실적

【 2020. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	관	항	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
하수도과				70,734,019	37,903,426	32,830,593	53.6
	하수도사업비용			34,804,833	23,836,968	10,967,865	68.5
		영업비용		34,564,833	23,768,283	10,796,550	68.8
			관거비	15,514,015	8,516,761	6,997,254	54.9
			처리장비	15,493,944	14,080,311	1,413,633	90.9
			일반관리비	3,556,874	1,171,211	2,385,663	32.9
		특별손실		90,000	68,685	21,315	76.3
			기타특별손실	90,000	68,685	21,315	76.3
		예비비		150,000	-	150,000	-
				150,000	-	150,000	-
			예비비
	자본적지출			35,929,186	14,066,458	21,862,728	39.2
		유형자산취득		34,159,186	13,453,034	20,706,152	39.4
			구축물	33,329,586	13,233,182	20,096,404	39.7
			기계장치	588,000	82,404	505,596	14.0
			차량운반구	75,000	47,697	27,303	63.6
			공기구비품	6,600	5,341	1,259	80.9
			건설중인자산	160,000	84,410	75,590	52.8
		비가동설비자산취득		920,000	613,424	306,576	66.7
				920,000	613,424	306,576	66.7
			건설중인자산
		기타자본적지출		600,000	-	600,000	-
			정부보조금반환	600,000	-	600,000	-
		예비비		250,000	-	250,000	-
			예비비	250,000	-	250,000	-

2020 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

▸ 남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비공사 추진

- 관로정비 11.5km, 배수설비 463개소 (공정율 26%)

▸ 남부2-2,2-2배수분구 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 추진

- 공정율 80.5%

▸ 중앙동 배수설비 설치공사 외 3건

- 배수설비 195개소 설치완료

◦ 공공하수처리장 운영을 통한 수질환경개선

▸ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

▸ 하수처리시설 기능보강 추진으로 처리효율 향상 및 수질오염 저감

◦ 하수찌꺼기 감량화 사업 추진을 위한 재원확보 및 악취방지대책 추진

▸ 국고보조금 47억원, 도비 10억원, 기금 3억원 추가 확보

▸ 여름철 공사 추진에 따른 악취방지를 위한 탈취기 추가 설치

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

▸ 소규모 공사 76건 완료 및 생활민원처리 848건 완료

▸ 시내 일원 침수 우려 지역 12개소 등 하수도 L=25.5km 준설 완료

▸ 하수생활민원 처리를 위한 직원 비상근무조 편성운영 : 1,088건

- 맨홀 및 하수도 준설, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차조정 등

□ 반      성

◦ 중앙동 등 구도심지역 배수설비 설치공사시 옥내위치 및 위치불명 정화조에 대하여 시공여건과 건물 소유주와의 비용분담 등의 협의 어려움으로 일부 미설치

2020 주요업무 추진상황

	□	남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 익산시 하수도정비 기본계획 수립용역 하수찌꺼기 감량화 사업 공공하수처리시설 운영관리 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 소규모 하수도관련 주민숙원사업

1		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2022. 5. (3년)

◦ 사 업 비 : 36,490백만원(국비 25,543, 도비 1,094, 시비 9,853)

▸ 2020년 사업비 1,447백만원(국비 1,013, 도비 43, 시비 391)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=30.5km, 배수설비 2,616가구

□ 상반기 추진실적

◦ 시설공사 1차분 착공  [(주)성지건설]	: 2019. 5. 29.

◦ 건설사업관리용역 착수  [(주)삼안]	: 2019. 5. 31.

◦ 시설공사 2차분 착공	: 2020. 3. 16.

◦ 시설공사 1차분 준공	: 2020. 5. 27.

※ 2020.6월말 현재 공정율 : 26% (관로 11.5km, 배수설비 463가구)

□ 하반기 추진계획

◦ 시설공사 시행	: 2020. 7. ~ 2022. 5.

※ 장기 계속사업으로 2022. 5월 준공 예정

2		익산시 하수도정비 기본계획 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 12.(2년)

◦ 사업내용 : 개발여건 변화에 따른 하수처리구역 확대검토, 공공하수처리장 증설검토, 소규모 공공하수처리장 신·증설 계획 검토 등

◦ 총사업비 : 1,700백만원 (시비)

※ 2020년 사업비 900백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 기본계획용역 익산시 계약심사	: 2019. 2. 21.

◦ 기본계획용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 5. 14.

◦ 기본계획용역 착수	[(주)유신]	: 2019. 7. 30.

◦ 기본계획용역 주민설명(금마면 천마동마을)	: 2020. 6. 12.

◦ 기본계획용역 환경부 협의	: 2020. 6. 12.

※ 2020.6월말 현재 공정 : 71%

□ 하반기 추진계획

◦ 하수도정비기본계획(안) 작성 및 검토 협의	: 2020. 하반기 중

※ 전라북도 새만금수질개선과, 전북지방환경청 환경관리과

◦ 하수도정비기본계획(안) 승인 [환경부]	: 2021. 상반기 중 (예상)

3		하수찌꺼기 감량화사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 26,844백만원(국비70%, 도비15%, 시비12%, 기금3%)

◦ 사업내용 : 전처리설비, 혐기성소화조, 바이오가스 정제설비 등 개선 및 신설

□ 상반기 추진실적

◦ 감량화사업 공사에 따른 악취 저감 대책	: 2020. 1. ~ 6.

▸ 탈취기 (250㎥/min) 1식 추가 설치	: 2020. 6월 말

- 분뇨투입동 저류조, 임시탈수기동, 임시호퍼실 악취 포집 처리

▸ 저류조 3조, 농축조 2조 준설공사 시 악취 방지대책 추진

- 덮개 개방 최소화 및 탈취배관 연결하여 악취 흡입

- 준설공사 시 탈취제 살포 및 준설슬러지 즉시 처리

▸ 임시탈수기동에 셔터 및 에어커튼 설치로 악취 방출 방지

▸ 분뇨투입동 저류조 교반기 교체(에어식→기계식)	: 2020. 4. 14.

▸ 노후 잉여가스 연소기 교체	: 2020. 5. 11.

◦ 건설사업관리용역(2차분) 계약(694백만원)	: 2020. 2. 26.

◦ 시설공사(2차분) 계약(2,784백만원)	: 2020. 4. 27.

◦ 전기계측공사(2차분) 계약(433백만원)	: 2020. 5. 11.

◦ 토목, 기계, 전기분야 관급자재 구입(탈취기 외 39종 4,296백만원)

□ 하반기 추진계획

◦ 기존 탈수기동 철거 및 슬러지처리동 기초작업  : 2020.  7. ~ 11.

◦ 무기물 분리시설 외 25종 관급자재 계약(57억원) : 2020.  7.

◦ 소화조 준설	: 2020. 11.~

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 사 업 개 요

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소

하수처리시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	13개소
운영방식	위탁운영 : (주)전북엔비텍BTO 위탁기간 : 2020. ~ 2028.

※ 2020년 BTO위탁운영비 예산 : 124억원(도비 5.9억원 시비 118억원)

□ 상반기 추진실적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개항목)

▸ 익산 외 4개소(일1회), 수질TMS 유지관리(5개항목)

◦ 북부, 함열, 금마, 여산공공하수 악취기술진단 완료     : 2020. 6. 19.

◦ 3중계펌프장 조목스크린 등 설치공사 시행(661백만원)  : 2020. 4. 23.

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 기준 준수(부지경계, 탈취기 배출구)

▸ 익산공공하수 등 4개 처리시설 1, 2분기 완료

□ 하반기 추진계획

◦ 익산공공하수처리장 차집관로 보수공사 시행          : 연중

◦ 익산공공하수 및 금강분뇨 악취기술진단 시행         : 2020. 8.

◦ 공공하수처리시설 TOC(총유기탄소) 측정기기 설치    : 2020. 8.

5		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 24개소

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	76개소	5,500	5,000	2개소
운영방식	위탁운영 : 환경시설관리(주), (유)대신환경개발 위탁기간 : 2020. ~ 2022.

※ 2020년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비 예산 : 27.8억원

□ 상반기 추진실적

◦ 공공하·폐수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개항목)

▸ 3산단 폐수 외 1개소(일1회), 여산하수(일1회), 소규모 12개소(주1회), 소규모 9개소(월1회)

▸ 공공하·폐수처리시설 및 중계펌프장 운영	: 주 4~5회 수시점검

◦ 공공하·폐수처리시설 시설 개보수를 통한 효율 증대

▸ 동산유천 하수처리시설 펌프 교체 등 9건	: 2020. 1. ~ 6.

◦ 소규모 하수처리시설 기술진단 개선공사	: 2020. 6.

◦ 공공하·폐수처리시설 원격감시제어 시스템 구축	: 2020. 6.

▸ 설계 및 계약심사 완료·착수

□ 하반기 추진계획

◦ 공공하·폐수처리시설 원격감시제어 시스템 구축 완료 : 2020. 12.

◦ 소규모하수 기술진단 개선공사(왕궁상발 외 2개소)   : 2020.  7.

◦ 공공하·폐수처리시설 시설 개·보수                  : 연중

6		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 제1국가산업단지 일원(약40만평)

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 12.(3개년)

◦ 사 업 량 : 노후하수관로 정비 L=13.4km

◦ 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000 도비 500 시비 4,500)

□ 상반기 추진실적

◦ 사업구간 대로 및 외곽도로 정비 환경부 추가 승인

▸ 사업위치 : 변경없음

▸ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2022. 12.(1년 연장)

▸ 사 업 량 : 노후하수관로 정비 L=21.4km(8km 연장)

▸ 총사업비 : 15,077백만원(증 5,077백만원)

※ 국비 7,538.5(50%), 도비 753.8(5%), 시비 6,784.2(45%)

□ 하반기 추진계획

◦ 용역 결과 보고	: 2020.  7.

◦ 실시설계 완료	: 2020.  8.

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 추진	: 2020.  8. ~ 2020. 9.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2020. 10. ~ 2022. 12.

7		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 비 : 1,846백만원

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 6.

◦ 사업내용

▸ 시민 불편 하수도 시설물 개선 등 소규모 숙원사업 추진

▸ 하수관 내 퇴적토, 슬러지 준설, 하수관로 연결 등 생활민원 처리

□ 상반기 추진실적

◦ 소규모 공사 76건 시행 완료 및 생활민원처리 848건 시행

◦ 침수 우려 지역 12개소 및 하수찌꺼기 등의 퇴적물로 인해 원활한

하수 배제를 위한 준설 약 80개소 L=25.5km(200ton) 완료

□ 하반기 추진계획

◦ 하수도 시설물 보수 및 유지관리 시행	: 2020. 7. ~ 2020. 12.

▸ 지속적인 하수도 시설물 소파 보수, 퇴적토 및 슬러지 준설, 맨홀 뚜껑 교체 및 관로 주변 파손 도로 복구 등 시민 불편 사항 신속 대응

▸ 강우 시 저지대 등의 상습적인 침수 지역 및 하수도 찌꺼기로 인한 악취 발생 예방을 위한 준설 실시