2020. 10. 19.

제231회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 결산보고

	건 설 국

도시재생과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예산집행실적
□	2020 주요성과
□	2020 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민 중심의 도시재생과 도시경쟁력 강화

		전 략 목 표
◦	구도심 지역의 도시기능 회복
◦	지역 균형 발전 기틀 마련
◦	다양성이 조화로운 매력적인 도시이미지 창출

		중 점 과 제
◦	지속가능한 도시재생전략계획 마련
◦	원도심 재생을 통한 생활환경개선 및 지역활성화
◦	자연과 역사·문화 자원을 연결하는 도시 경관 형성 및 관리

일  반  현  황

□ 기          구

						도시재생과
	재 생 행 정						재 생 시 설						경관디자인

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13		1	3	4	2	3
현 원	12		1	3	3	2	3
증 감	△1		-	-	△1	-	-

□ 사  무  분  장

	◦	재생행정	:	도시재생 종합기획조정, 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립, 도시재생 뉴딜사업 국가공모사업 추진, 소규모 재생사업 공모 및 추진, 도시재생지원센터 운영
	◦	재생시설	:	새뜰마을 사업(KTX 익산역 주변지구, 모현동 옥창지구, 동산동 월담지구, 평화지구) 추진, 도시재생 뉴딜사업 추진(역사가 문화로, 푸른솔 세대통합 행복마을, 독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)
	◦	경관디자인	:	경관 및 공공디자인 국가공모사업 추진, 경관계획 및 공공디자인 진흥계획 수립 및 운영, 경관 및 공공디자인 협의, 생활안전 환경디자인사업 추진

□ 위원회 현황

(단위 : 명)

위 원 회 명	위 원 장	위 원 수			비 고
		계	당연직	위촉직
원도심 활성화사업 위원회	부 시 장	15	4	11
경관 위원회	미정	45	4	41
공공디자인 위원회	최승희 교수	29	1	28
도시재생 위원회	엄수원 교수	17	2	15

□ 도시재생활성화지역 지정 현황

권역	지역명		면적(㎡)	유형	지역특성	비고
A 원도심 역세권 재생권역	1	역사가(驛史街) 문화로(文化路)	185,007	근린재생형	원도심/전통시장/근대역사
	2	익산 KTX역 동편 원도심	1,200,000	근린재생형	원도심/전통시장/근대역사
	3	익산 KTX역 서편	613,000	근린재생형 (도시경제 기반형 가미)	KTX역/서부역사진입로
	4	송학동	423,000	근린재생형	개별아파트입지/변전소
	5	남부지구	906,000	근린재생형	버스터미널/준공업지역/위락시설
	6	동산동	483,000	근린재생형	단군성묘/동산새뜰마을
	7	인화마동	1,173,000	근린재생형	전통시장/하이트공장
	8	동부시장	1,379,000	근린재생형	동부시장/주공A/구획정리사업지구
	9	남중동	1,079,000	근린재생형	익산시청/모현우남A/행정업무시설
	10	모현동	1,046,000	근린재생형	노후아파트(모현우남A)/원광여중고
	11	신동	842,000	근린재생형	대학로/구획정리사업지구
	12	남부시장	115,000	근린재생형	근대역사/전통시장
	13	신청사	162,000	근린재생형	익산시청/여성회관/올림픽기념관
	14	팔봉동	588,000	근린재생형	준공업지역/이리신흥초
B 역사문화 재생권역	1	금마고도	1,095,000	근린재생형	고도지구/유네스코세계유산
C 농촌중심지 재생권역	1	함열	1,484,000	근린재생형	전통시장/읍소재지/공공기관

2020 예산집행실적

【 2020. 9. 30. 현재 】                                     (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도시재생과				29,309,225	12,099,543	17,209,682	41.3
	도시재생관리			28,779,210	11,767,403	17,011,807	40.9
		도시재생		27,218,464	11,213,025	16,005,439	41.2
			도시재생사업	1,761,734	1,662,155	99,579	94.3	명시이월
			도시재생 아카데미 및 지원센터 운영	42,735	19,110	23,625	44.7	명시이월
			지역역량강화 (도시활력증진지역개발)	172,624	52,432	120,192	30.4	명시이월 지역역량강화 사업으로 하반기 사업 추진 완료
			취약지역 개조 (도시/새뜰마을사업)	1,274,629	1,047,587	227,042	82.2	사고이월
			취약지역 개조 (도시/동산동 월담지구 새뜰마을사업)	2,198,514	816,995	1,381,519	37.2	명시이월 사고이월 마을안길정비토지 협의매수 진행중
			모현동 옥창지구 새뜰마을사업	2,183,517	158,286	2,025,231	7.2	명시이월 마스터플랜 수립용역 완료 후 연차별 사업 추진
			도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)	12,317,021	4,301,731	8,015,290	34.9	명시이월 계속비이월 대체부지 마련 및 활성화계획 변경 진행
			도시재생 뉴딜사업 (푸른솔 세대통합 행복마을)	3,397,520	2,305,355	1,092,165	67.9
			도시재생 뉴딜사업 (독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2,872,520	778,739	2,093,781	27.1	대상지 소유자 매각의사 철회, 대체부지 마련 공유재산 심의 후 협의 매수(솜리문화공방, 8.5억)
			도시재생 뉴딜 소규모 재생사업(남부시장 일원)	70,650	70,635	15	100.0	명시이월
			평화지구 새뜰마을사업	829,000	0	829,000	0.0	3회 추경 마스터플랜 수립용역 완료 후 연차별 사업 추진
			도시재생 뉴딜 소규모 재생사업(금마고도지역 일원)	98,000	0	98,000	0.0	3회 추경 주민교육, 골목길경관조성, 행사 등 하반기 사업 추진
		도시경관디자인		1,560,746	554,378	1,006,368	35.5
			도시디자인	770,746	284,907	485,839	37.0	명시이월 3회 추경 설계용역중
			도시경관 개선사업	790,000	269,471	520,529	34.1	명시이월 11월 준공
	행정운영경비			530,015	332,140	197,875	62.7
		인력운영비		511,451	318,836	192,615	62.3
			인력운영비	136,640	91,913	44,727	67.3
			도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)	169,851	112,684	57,167	66.3	명시이월
			도시재생 뉴딜사업 (푸른솔 세대통합 행복마을)	102,480	56,679	45,801	55.3
			도시재생 뉴딜사업 (독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	102,480	57,560	44,920	56.2
		기본경비		18,564	13,304	5,260	71.7
			기본경비	18,564	13,304	5,260	71.7

2020 주요성과

□ 성      과

◦ 2020년 도시재생 뉴딜사업 공모 선정

▸남중동 신청사지역 도시재생 뉴딜사업 선정(2020. 9.)

- 마중물 사업비 : 16,700백만원(국비 10,000 지방비 6,700)

- 행복주택, 생활속 어울림플랫폼, 상생협력상가 및 마당 등 조성

▸소규모재생 공모사업 선정(금마고도지역, 98백만원)

▸주민교육지원사업 선정(금마고도지역, 7백만원)

▸주민역량강화사업 선정(신청사지역, 5백만원)

◦ 도시재생 뉴딜사업으로 원도심 지역 활성화에 기여

▸중앙동 도시재생 뉴딜사업 본격화

- 어울림센터, 중매서커뮤니티라운지, 음식/식품교육문화원, 문화주차장 실시설계 추진

- 세대공감 복합커뮤니티시설, 문화이리로, 중앙시장 안전골목길 조성 등 착공

▸송학동 도시재생 활성화를 위한 추진토대 마련

- 푸른솔 커뮤니티센터, 공동체 텃밭 등 설계용역 시행

- 도시재생 거버넌스 구축(송학동 현장지원센터 구축)

▸인화동 도시재생 활성화를 위한 추진토대 마련

- 솜리 상생상회 조성, 4.4만세운동기념길공원조성 등 설계용역 시행

- 도시재생 거버넌스 구축(인화동 현장지원센터 구축)

◦ 새뜰마을 사업 추진으로 생활인프라 확충 및 주거환경 개선 기여

▸평화동 평화지구 2020 신규 새뜰마을사업 공모 선정(2020. 3.)

- 총 사업비 : 4,134백만원(국비 2,894 도비 372 시비 868)

▸모현동, 평화동 새뜰마을 사업 마스터플랜 용역 추진

◦ 경관 및 공공디자인 사업 추진을 통한 아름답고 쾌적한 도시환경조성

▸강곁으로 흐르는 금빛, 수변경관 조성사업 착공

▸문화가 머무는 안전주차장, 라운드어바웃@익산 공사 착공

▸학교주변 등 생활밀착형 환경디자인 개선 추진

□ 반      성

◦ 문화주차장 등 보상지연에 따른 대체부지 마련, 주민의견 반영을 위한 도시재생 활성화계획 변경 등으로 인한 사업 추진 지연. 적극적이고 신속하게 사업을 추진해 나가겠음

2020 주요업무결산

		도시재생 활성화계획 수립
		KTX 익산역 주변지구 새뜰마을 사업
		동산동 월담지구 새뜰마을 사업
		모현동 옥창지구 새뜰마을 사업
		도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)
		도시재생 뉴딜사업 (푸른솔 세대통합 행복마을)
		도시재생 뉴딜사업 (독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)
		수변경관 조성사업(강곁으로 흐르는 금빛)
		공공디자인으로 행복한 공간 만들기 사업
		학교주변 생활안전 환경디자인 사업

1		도시재생 활성화계획 수립

□ 사 업 개 요

◦ 사업범위 : 신청사 활성화지역(약 16만㎡), 금마고도 활성화지역(약 100만㎡)

◦ 용역기간 : 2019. 12. ~ 2020. 12.(12개월)

◦ 용 역 비 : 358백만원

◦ 주요내용

▸도시재생 활성화계획 수립 및 2020년 도시재생 뉴딜 공모사업 대응

▸현황 및 여건분석을 통한 지역주민 중심의 종합적인 실행계획 수립

□ 추 진 실 적

◦ 도시재생 활성화계획(안) 수립용역 착수	: 2020.  1.

▸남중동 신청사지역, 금마면 금마고도지역

◦ 도시재생 활성화계획(안) 주민공청회 및 의회의견청취	: 2020.  4. ~ 5.

◦ 계획(안) 부서협의 및 市도시재생위원회자문	: 2020.  5. ~ 6.

◦ 2020년 도시재생 뉴딜사업 공모신청	: 2020.  7.

◦ 국토교통부 평가(현장실사, 실행 및 타당성 평가 등)	: 2020.  7. ~ 8.

◦ 도시재생특별위원회 심의 및 사업선정	: 2020.  9. 16.

▸신청사 지역, 총사업비 167억원

□ 마무리 대책

◦ 신청사지역 도시재생 활성화계획(안) 승인 및 고시	: 2020. 11.

▸道 도시재생위원회 심의

2		KTX 익산역 주변지구 새뜰마을 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2020년(6개년)

◦ 사업면적 : 35,089㎡

◦ 사업내용 : 소방도로 개설, 완충녹지 조성, 도시가스공급, 경로당 신축·주택정비지원, 마을공동체 지원사업, 주민역량강화사업 등

◦ 사 업 비 : 6,924백만원(국비 4,368  도비 578  시비 1,978)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액 (2015~2019)	2020년 예산 (이월비)	비 고
총계	6,924	5,649	1,275
국비	4,368	3,735	633
도비	578	452	126
시비	1,978	1,462	516

□ 추 진 실 적

◦ 좁은 골목 확장공사 준공(L=105m, B=3~7m)	: 2020.  3.

◦ 완충녹지 조성공사 준공(2,072㎡)	: 2020.  5.

▸수목 식재, 운동 기구, 안내판 등

◦ 가로환경정비사업 준공(L=220m, B=5m)	: 2020.  7.

▸포장 및 도막 처리(A=3,241㎡), 보도 정비(A=1,277㎡)

□ 마무리 대책

◦ 주민역량강화 및 휴먼케어용역 마무리	: 2020. 12.

▸지역주민 역량 강화를 위한 문화교실(풍물, 노래), 주민리더교육, 마을 희망일자리(비누, 목공 프로그램) 등 용역 추진
(코로나19 용역 중지 중이나, 과업내용 변경 후 10월 중 재착수 예정)

3		동산동 월담지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 동산동 356번지 일원

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2021년(6개년)

◦ 사업면적 : 43,300㎡

◦ 사업내용 : 주택정비 지원, 안전확보, 생활·위생인프라, 마을공동체 지원사업, 주민역량강화사업 등

◦ 사 업 비 : 3,850백만원(국비 2,694  도비 346  시비 810)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액 (2016~2019)	2020년 예산 (이월비)	비 고
총계	3,850	1,651	2,199
국비	2,694	1,317	1,377
도비	346	97	249
시비	810	237	573

□ 추 진 실 적

◦ 주민공동이용시설 대상부지 매입	: 2020.  3.

▸동산동 330-9번지 일원(333㎡)

◦ 주민공동이용시설 설계 착수	: 2020.  5.

◦ 사면보강사업 및 축대개선사업 준공	: 2020.  5.

▸옹벽(L=126m, H=2.0~5.5m), 데크계단(46m) 등

◦ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 착수	: 2020.  7.

◦ 마을안길 정비사업 편입토지 보상계획 공고	: 2020.  7.

□ 마무리 대책

◦ 마을안길 및 도시가스 공급 추진	: 2020.  9. ~ 12.

▸편입토지 재감정 및 보상

◦ 주민공동이용시설 실시설계 완료	: 2020. 10.

◦ 주민공동이용시설 공사 착공 및 준공	: 2020. 11.~2021. 3.

4		모현동 옥창지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 모현동1가 67-73번지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4개년)

◦ 사업면적 : 29,925㎡

◦ 사업내용 : 안전확보, 생활·위생인프라 구축, 주택정비 지원, 마을공동체
지원사업, 휴먼케어 및 주민역량강화사업 등

◦ 사 업 비 : 4,200백만원(국비 2,940  도비 378  시비 882)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
총계	4,200	1,177	1,007	1,009	1,007
국비	2,940	824	705	706	705
도비	378	106	91	91	90
시비	882	247	211	212	212

□ 추 진 실 적

◦ 우선사업(사면보강공사) 설계 및 설계심의 완료	: 2020.  4.

▸편입토지 분할 완료	: 2020.  6.

◦ 마스터플랜 관련 주민워크샵(3회)	: 2020.  5. ~ 6.

▸새뜰마을 사업내용에 대한 주민 협의 및 요구사항 수렴

◦ 코로나19로 인한 마스터플랜 수립 용역 일시 중지	: 2020. 9. 22.

□ 마무리 대책

◦ 편입토지 협의 보상 추진	: 2020. 10. ~ 11.

◦ 우선사업(사면보강공사) 추진	: 2020. 12.~2021. 1.

5		도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 중앙동1가 24번지 일원(원도심 지역)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5개년)

◦ 사업면적 : 약 185,007㎡

◦ 사업내용 : 익산 사회․경제 어울림센터 조성, 익산 푸드 문화메카 조성, 중․매․서 커뮤니티라운지 조성, ‘삼산’기억명소화 프로젝트 익산역 프롬나드 조성, 세대공감 커뮤니티센터 조성, 익산 도시재생 거버넌스 구축

◦ 사 업 비 : 25,000백만원(국비 15,000  도비 2,500  시비 7,500)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2018년	2019년	2020년	2021년이후	비고
총계	25,000	7,250	7,850	3,650	6,250
국비	15,000	4,350	4,710	2,190	3,750
도비	2,500	725	785	365	625
시비	7,500	2,175	2,355	1,095	1,875

□ 추 진 실 적

◦ 도시재생 뉴딜사업 본격화

▸음식/식품 교육문화원 건축물매입 및 설계	: 2020.  2.

▸세대공감 복합커뮤니티시설 리모델링 공사 착공	: 2020.  3.

▸중매서 커뮤니티 라운지 실시설계 시행	: 2020.  4.

▸문화이리로 조성 착수	: 2020.  5.

-상징조형물(보석기차, 기차미니어처 등) 설치 및 야간경관 조명 제작

▸중앙시장 안전골목길조성사업 공사 착공	: 2020.  5.

▸특화거리(다문화거리, 어울림플랫폼) 지중화 협약	: 2020.  6.

-전기선로(한전), 통신선로(SK텔레콤 외 5개사) 지중화

-중앙새마을금고~손약국(220m), 동제약국~삼일식당(530m)

▸중앙시장 안전골목길조성사업 공사 준공	: 2020.  9.

▸문화주차장 조성 공사 착공	: 2020.  9.

▸도시재생 사업 현행화에 따른 활성화계획 변경 용역 착수	: 2020.  9.

□ 마무리 대책

◦ 도시재생 사업 현행화에 따른 활성화계획 변경 및 단위사업 추진

▸문화주차장 대체부지 확보에 따른 행정 절차 이행	: 2020. 10. ~ 11.

▸세대공감 복합커뮤니티시설 리모델링 공사 준공	: 2020. 10.

▸어울림플랫폼 리모델링 공사 착수	: 2020. 12.

▸음식/식품 교육문화원 건축물 리모델링 착수	: 2020. 12.

▸중매서 커뮤니티 라운지 조성 공사 착수	: 2020. 12.

▸문화이리로 공사 준공	: 2020. 12.

▸문화주차장(문화예술의 거리 인근) 공사 준공	: 2020. 12.

6		도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 송학동 97-10번지 일원(KTX익산역 서편지역)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4개년)

◦ 사업면적 : 193,000㎡

◦ 사업내용 : 푸른솔커뮤니티센터, 커뮤니티가든 조성, 공동체 일자리플랫폼, 자원순환형 공동체텃밭, 도시재생리빙랩스테이션, 도시재생거버넌스 운영 등

◦ 사 업 비 : 16,700백만원(국비 10,000  도비 1,600  시비 5,100)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	16,700	3,500	4,865	4,865	3,470
국비	10,000	2,100	3,000	3,000	1,900
도비	1,600	350	500	500	250
시비	5,100	1,050	1,365	1,365	1,320

□ 추 진 실 적

◦ 도시재생 활성화계획 고시(익산시)	: 2020.  1.

◦ 도시재생 활성화를 위한 추진토대 마련	: 2020.  1. ~ 6.

▸거점시설(푸른솔커뮤니티센터, 공동체 텃밭) 부지확보 완료

▸도시재생 거버넌스 구축(송학동 현장지원센터 구축)

◦ 도시재생대학 운영	: 2020.  7. ~ 8.

◦ 주민공모사업 추진	: 2020.  7. ~ 9.

◦ 주요 단위사업 설계 추진	: 2020.  9.

▸마을안길 정비, 상업가로환경 정비, 자원순환형 공동체 텃밭 조성

□ 마무리 대책

◦ 부지 협의 매입 지속 추진	: 2020.  9. ~ 12.

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민 활동 추진	: 2020.  9. ~ 12.

▸송학동 도시재생 주민협의체 및 도시재생대학 운영(코로나19 완화 시)

◦ 주요 단위사업 설계 준공	: 2020. 12.

▸마을안길 정비, 상업가로환경 정비, 자원순환형 공동체 텃밭 조성

7		도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 인화동1가 119번지 일원(인화동 남부시장지역)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4개년)

◦ 사업면적 : 114,500㎡

◦ 사업내용 : 주민복지공간 및 근대역사의 숲 조성, 솜리상생상회 조성, 노후주거지 환경 개선, 공동체 거버넌스 구축 등

◦ 사 업 비 : 14,200백만원(국비 8,500  도비 1,400  시비 4,300)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	14,200	2,975	4,115	4,115	2,995
국비	8,500	1,785	2,550	2,550	1,615
도비	1,400	297	425	425	253
시비	4,300	893	1,140	1,140	1,127

□ 추 진 실 적

◦ 도시재생 활성화계획 승인(전북도)	: 2020.  5.

◦ 도시재생 활성화계획 고시(익산시)	: 2020.  5.

◦ 도시재생 활성화를 위한 추진토대 마련	: 2020.  1. ~ 6.

▸거점시설(솜리상생상회) 부지확보, 도시재생 거버넌스 구축(인화동 현장지원센터 구축)

◦ 주요 단위사업 설계용역 착수	: 2020.  9.

▸상생협력상가 및 상생마당 조성, 4.4만세운동 기념길 및 광장 정비

□ 마무리 대책

◦ 부지 협의 매입 지속 추진	: 2020.  9. ~ 12.

▸빈공간 활용 커뮤니티정원 조성사업, 솜리 문화공방 조성사업

◦ 주요 단위사업 설계용역 추진	: 2020.  9. ~ 12.

▸구시장길·한복거리 가로디자인, 상생협력상가 및 상생마당 조성, 4.4 만세운동 기념길 및 광장 정비

◦ 건축자산 진흥구역 지정 및 관리계획 수립용역(1차)	: 2020. 12.

▸인화동 도시재생지역 건축자산 기초조사 후 종합적 관리를 위한 구체적 지침 및 운용계획 마련

8		수변경관 조성사업(강곁으로 흐르는 금빛)

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 강곁으로 흐르는 금빛, 수변경관 조성사업

※ 2019년 경관디자인 조성사업 공모사업(전라북도)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년)

◦ 위    치 : 동산교 ~ 동산동 행정복지센터 구간

◦ 규    모 : L=770m

◦ 주요내용 : 친수문화형 수변경관 개선

▸수변경관 개선 및 산책로 야간경관 조성

▸옹벽디자인 개선 및 주민쉼터 조성 등

◦ 사 업 비 : 740백만원(도비 296  시비 444)

□ 추 진 실 적

◦ 디자인개발 및 설계용역	: 2019. 12.~2020. 4.

▸공공디자인위원회 심의	: 2020.  2.

◦ 설계심의 및 계약심사	: 2020.  5.

◦ 도 원가심사	: 2020.  6.

◦ 농업생산기반시설 사용 임대차 계약 체결	: 2020.  7.

◦ 공사 발주	: 2020.  7.

◦ 공사 착공	: 2020.  8.

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공	: 2020. 11.

9		공공디자인으로 행복한 공간 만들기 사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 공공디자인으로 행복한 공간만들기
(문화가 머무는 안전주차장, ‘라운드어바웃@익산’)

※ 2019년 공공디자인으로 행복한 공간만들기 공모사업(문화체육관광부)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년)

◦ 위    치 : 익산시 창인동1가 103-14 일원(중앙시장 주차장)

◦ 수행기관 : (재)익산문화관광재단

◦ 주요내용 : 공영주차장 안전디자인 매뉴얼 수립, 주차시설 안전디자인 및 환경디자인 개선, 주차장 활용 문화프로그램 개발

◦ 사 업 비 : 600백만원(국비 420  시비 180)

▸1차(2019년) : 172백만원(국비 120  시비  52)

▸2차(2020년) : 428백만원(국비 300  시비 128)

□ 추 진 실 적

◦ 2차사업(시공비) 지원여부 평가	: 2020.  2.

◦ 2차사업 업무협약 체결	: 2020.  3.

▸한국공예디자인문화진흥원-익산시-(재)익산문화관광재단 3자 협약

◦ 2차사업 위탁사업비 교부((재)익산문화관광재단)	: 2020.  4.

◦ 시범사업 대상지 공사 착공	: 2020.  7.

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공	: 2020. 10.

◦ 문화프로그램 운영	: 2020. 10. ~ 11.

◦ 사업백서 발간	: 2020. 11.

◦ 최종 보고 및 성과평가	: 2020. 12.

10		학교주변 생활안전 환경디자인사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 생활안전 환경디자인사업

◦ 사업기간 : 2020. 3. ~ 11.

◦ 위    치 : 고현초등학교, 함열초등학교, 함열여자중·고등학교 일원

◦ 규    모 : 3개소

◦ 주요내용 : 범죄예방 환경디자인(CPTED) 설계 및 설치

▸사업위치에 맞는 범죄예방 및 생활안전 환경디자인 개발

▸안전시설물, 야간경관조명 등 환경시설물 개선

◦ 사 업 비 : 100백만원

□ 추 진 실 적

◦ 현장 사전조사	: 2020.  3.

◦ 관계기관 및 부서 협의	: 2020.  4. ~ 5.

◦ 설계착수	: 2020.  6.

◦ 설계완료 및 계약심사	: 2020.  8.

◦ 공사 착공(전기)	: 2020.  9.

□ 마무리 대책

◦ 공사 착공(시설물)	: 2020. 10.

◦ 공사 준공(시설물, 전기)	: 2020. 11.