2020. 10. 19.

제231회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 결산보고

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예산집행실적
□	2020 주요성과
□	2020 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	20		1	4	9	4	2
현 원	21		1	7	10	3	0
증 감	1		-	3	1	△1	△2

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	건설과 소관 용지매입, 토지수용 재결, 소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등, 사업관련 협의, 시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업 추진
	◦	하천시설	:	하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업
	◦	하천관리	:	하천유지관리(국가,지방,소하천),용안생태습지유지관리 하천사용료 징수 부과, 골재채취허가
	◦	가로등관리	:	가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	154.779	168.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	28.169	74.034	27%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
480	408	55	17	243,375	225,941	11,263	6,171

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
30,165등	19,653등	10,512등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2020 예산집행실적

【 2020. 9. 30. 현재 】                                    (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위		세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과					44,867,468	17,441,756	27,425,712	38.9
	도로시설관리				20,245,530	8,982,795	11,262,735	44.4
		시군농어촌도로확포장공사			14,366,585	5,699,181	8,667,404	39.7
				금마갈산~서편간도로 확포장공사	656,165	292,331	363,834	44.6	명시456,165 본 200,000
				망성신성~관산간 도로확포장사업	467,076	342,196	124,880	73.3	명시327,000 사고 90,076 본 50,000
				오산장신~만석간 도로확포장공사	3,978	1,400	2,578	35.2	명시 3,978
				왕궁온수~시대간 (황암~상발) 도로확포장공사	284,394	74,785	209,609	26.3	사고284,394
				촌포토다리~덕동간 도로확포장공사	701,262	311,585	389,677	44.4	명시450,000 사고251,262
				미불용지매입비 (시군도농어촌도로)	100,000	96,137	3,863	96.1
				왕궁군도26호선 도로확포장공사	213,632	19,067	194,565	8.9	명시213,632
				용안창리법성간 도로확포장공사	846,918	792,760	54,158	93.6	명시477,658 사고139,260 본 230,000
				함라칠성~다은간 도로확포장공사	198,843	101,487	97,356	51.0	명시164,730 사고 34,113
				망성군도10호금지간 도로확포장공사	409,621	386,597	23,024	94.4	명시339,346 사고 20,275 3회 50,000
				금마누동~신촌간 도로확포장공사	319,409	7,206	312,203	2.3	명시180,000 사고139,409
				시군농어촌도로 확포장사업추진	15,598	9,330	6,268	59.8	명시 5,598 본 10,000
				군도23호선 도로확포장공사	4,802,888	1,980,909	2,821,979	41.2	명시 2,906,219 사고 1,896,669
				시군도도로관리계획및농어촌기본계획용역	117,920	0	117,920	0	명시117,920
				어양동어곳~부평간 도로확포장공사	371,131	312,639	58,492	84.2	명시65,756 사고 5,375 본 300,000
				오산면소재지진입도로 (군도2호)확포장공사	1,025,670	0	1,025,670	0	명시500,000 사고 25,670 본 500,000
				오산제일교회~정각사간 확포장공사	569,772	533,437	36,335	93.6	명시339,965 사고 59,807 본 170,000
				황등도선~외화간 도로확포장공사	334,200	62,905	271,295	18.8	명시300,000 사고 34,200
				오산역~상아마을간 병목구간도로확포장공사	182,160	11,452	170,708	6.3	명시182,160
				하나로~소간촌간 도로확포장공사	567,009	0	567,009	0	명시499,980 사고 67,029
				왕궁 양동마을 진입도로확포장공사	432,956	316,128	116,828	73.0	명시323,107 사고 29,849 3회 80,000
				춘포창평마을진입도로 확포장공사	100,000	0	100,000	0	명시100,000
				왕궁금오동~군도22호간 도로확포장공사	259,598	12,731	246,867	4.9	명시259,598
				금마신정~증왕간 도로확포장공사	535,577	2,731	532,846	0.5	명시500,000 사고 35,577
				춘포오룡선 도로확포장공사	110,808	31,368	79,440	28.3	명시110,808
				황등면 하동마을~동연지하차도 우회도로개설공사	500,000	0	500,000	0	명시500,000
				춘포노적선 도로확포장공사	100,000	0	100,000	0	본예산
				백제왕도탐방로 조성(익산토성)	70,000	0	70,000	0	3회추경
				시도31호도로 확포장사업	70,000	0	70,000	0	3회추경
		도로조명시설관리			2,799,350	2,097,989	701,361	74.9
				보안등신규설치	228,000	169,194	58,806	74.2
				노후가로등정비	834,700	585,017	249,683	70.1
				가로등보안등 유지관리	1,644,610	1,260,630	383,980	76.7
				가로등보수차량 운영유지비	16,040	13,000	3,040	81.0
				보안등신규설치 (보조)	76,000	70,148	5,852	92.3
		주민숙원사업			34,600	34,600	0	100
				주민숙원사업	34,600	34,600	0	100
		철도건널목개량사업			305,122	47,409	257,713	15.5
				평화육교재가설	305,122	47,409	257,713	15.5	사고305,122
		교통관리개선사업			1,239,873	480,898	758,975	38.8
				용안난포삼거리 위험도로 구조개선	373,873	355,993	17,880	95.2	사고373,873
				왕궁신호~용남 위험도로 구조개선	486,000	84,333	401,667	17.4	명시 80,000 본 406,000
				낭산~시영선형개량사업	100,000	23,683	76,317	23.7
				신왕교차로 회전 교차로설치사업	280,000	16,889	263,111	6.0
		지방도 도로확포장			1,500,000	622,718	877,282	41.5
				하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	1,500,000	622,718	877,282	41.5
	하천정비				24,550,636	8,391,862	16,158,774	34.2
		하천정비및유지관리			24,550,636	8,391,862	16,158,774	34.2
				하천제방유지보수	300,150	299,219	931	99.7	명시 92,150 본 208,000
				하천제방유지보수(자체)	2,294,001	1,533,991	760,010	66.9	명시983,526 본 1,279,475 3회 31,000
				국가하천유지관리 (4대강)	355,000	324,192	30,808	91.3
				지방하천정비 (왕궁천)	17,138,813	4,324,137	12,814,676	25.2	계속비 8,628,813 본 6,150,000 3회 2,360,000
				지방하천정비 (동면천)	1,495,961	10,553	1,485,408	0.7	계속비 1,055,961 본 4,500,000 3회△4,060,000 (왕궁천.동면천사업간예산조정)
				만경강물문학관 진입도로개설공사	694,500	646,255	48,245	93.1	명시 50,000 본 644,500
				국가하천유지보수(4대강외)	168,000	157,370	10,630	93.7
				소하천정비 (동산천)	1,834,798	1,014,254	820,544	55.3	명시237,798 본 905,000 3회 692,000
				소하천정비 (닭작골천)	269,413	81,891	187,522	30.4	명시269,413
	재무활동(건설과)				260	243	17	93.5
		보전지출			260	243	17	93.5
			시도비보조금반환금		260	243	17	93.5	주민참여예산 보안등사업
	행정운영경비(건설과)				71,042	66,856	4,186	94.1
		인력운영비			40,000	35,814	4,186	89.5
				국가하천유지보수 (인력운영비)	40,000	35,814	4,186	89.5
		기본경비			31,042	31,042	0	100
				기본경비	31,042	31,042	0	100

2020 주요성과

□ 성      과

◦ 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민편익 증대

‣공사완료 사업 : 5개사업 4.64km

-망성신성~관산간 도로확포장 (L=1.2km,B=7.0m)	: 2020.  8. 28.

-용안 창리~법성간 도로 확포장 (L=0.84km,B=8.0m)	: 2020.  6. 22.

-함라 칠성~다은간 도로확포장 (L=1.0km,B=8.0m)	: 2020.  5. 18.

-망성군도10호~금지간 도로확포장 (L=1.2km,B=8.0m)	: 2020.  9. 10.

-오산제일교회~정각사간 도로확포장 (L=0.4km,B=8.0m)	: 2020.  9. 21.

◦ 교통사고 위험지역 위험도로 구조개선(회전교차로 설치)1개소 완료

‣용안난포삼거리 위험도로 구조개선 준공	: 2020.  6. 29

◦ 만경강 문화관 보상금 공탁, 소유권이전, 이의재결 완료

‣중토위 수용 이의재결 보상금 상승분 공탁(3인-13백만원) 완료 : 2020. 3~ 8.

◦ 도로조명 설치 및 정비를 통해 밝은거리를 조성하여 안전한 통행로 확보

‣노후가로등 정비 - 272개소, 보안등 교체 및 설치 - 203개소

‣도로조명 민원처리 5,180건

□ 반      성

◦ 이례적으로 긴 장마기간과 집중호우로 왕궁천 하천정비공사 공정이 지연되었으나 공정계획변경 및 장비(인력) 동시 투입 등 만회대책으로 조속한 사업추진을 도모하겠음.

◦ 시군도 농어촌도로 편입 토지매입 협의가 다소 지연되어 예산집행률이 저조함. 앞으로 토지수용 재결 절차를 이행하여 조속한 시일내에 사업이 추진될 수 있도록 노력하겠음.

2020 주요업무결산

		시･군도 및 농어촌도로 확·포장 군도23호선 도로확·포장 평화육교 재가설 사업 왕궁천 하천 환경 정비사업 동면천 하천 환경 정비사업 소하천 정비사업(동산천.닭작골천) 만경강 문화관 조성사업 도로조명개선

1		시･군도 및 농어촌도로 확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산, 용동, 망성, 용안, 금마, 왕궁, 삼기, 함라, 춘포, 낭산, 황등, 어양동, 부송동 일원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년

◦ 사업규모 : L= 29.07km, B= 5.0~24.0m

◦ 총사업비 : 33개사업 / 48,825백만원 (2020년 예산 2,606)

□ 추 진 실 적

◦ 공사 완료 6개소	: 2020.  9.

▸망성 신성~관산간 도로확포장 외 5개소

◦ 공사 중 5개소	: 2020.  1. ~ 9.

▸춘포 토다리~덕동간 도로확포장 외 4개소

◦ 실시설계용역 및 행정절차 추진 12개소	: 2020.  1. ~ 9.

▸왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장 외 11개소

◦ 보상 중 10개소	: 2020.  1. ~ 9.

▸왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사 외 9개소

□ 마무리 대책

◦ 실시설계용역 완료 5개소	: 2020. 10.~2021. 6.

▸춘포 노적선, 낭산~시영, 하나로~소간촌, 오산면소재지 진입도로, 백제왕도탐방로

◦ 공사 추진 5개소	: 2020. 10. ~ 12.

▸춘포 토다리~덕동간 도로확포장 외 4개소

◦ 토지매입 중 10개소	: 2020. 10.~2021. 12.

시ㆍ군도 및 농어촌도로 사업추진현황 (계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2020년 예산액	금후 투자
	33개사업	L=29.07km B=5.0-24m	48,825	15,678	2,606	30,801
1	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=1.2km B=7.0m	1,248	1,198	50		준공	망성 303 (신선선)
2	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	1,480	1,250	230		준공	용안 203 (자석선)
3	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	825	825			준공	함라 201 (진다선)
4	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,105	1,055	50		준공	망성 102 (수용선)
5	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	870	700	170		준공	오산 203 (신수선)
6	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	회전교차로 1식	700	700			준공	지방도706 용안201	국고 100%
7	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	1,920	750		1,270	공사중 5%	춘포 103 (신화선)
8	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	980	580		400	공사중 45%	금마 102 (누부선)
9	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	1,000	400		600	공사중 5%	황등 104 (황팔선)
10	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m	1,290	700	80	510	공사중 45%	왕궁 207 (양곡선)
11	신왕교차로 회전교차로설치	회전교차로 1식	280		280		공사중 5%	지방도723 시도68호	국고 50%
12	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	616		2,187	보상중 5%	군도 21호
13	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m	3,100	950	300	1,850	보상중 56%	시도 1268
14	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,500	600		900	보상개시	금마 202 (서오선)
15	오산역 –상아마을간 도로확포장공사	L=0.2km B=8.0m	200	200			보상중 5%	오산 203 (신수선)
16	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	579	200	2,050	보상중 86%	금마 101 (서삼선)
17	춘포 오룡선 도로확.포장	L=0.5km B=8.0m	1,000	130		870	보상개시	춘포 102 (오룡선)
18	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	보상중 63%	왕궁 303 (사곡선)
19	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	보상중 63%	시도1201 (외화선)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2020년 예산액	금후 투자
20	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	보상중 85%	함라 301 (행진선)
21	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	보상중 52%	왕궁 302 (신평선)
22	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	정비계획 1식	160	160		160	설계중
23	왕궁 금오동~군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300		700	설계중	왕궁 102 (농장선)
24	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	L=0.7km B=8.0m	1,500	100		1,400	설계중	춘포 308 (창평선)
25	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	797		2,173	설계중	왕궁 210 (신기선)
26	황등 하동마을~ 동연지하차도간 도로확포장사업	L=0.7km B=8.0m	1,250	650		600	설계중
27	왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업	L=0.5km B=8.0m	486	80	406		설계중	군도19호	국고 50%
28	춘포 노적선 도로확포장	L=0.4km B=8.0m	700		100	600	설계중	춘포311 (노적선)
29	낭산-시영 선형개량사업	L=0.4km B=8.0m	1,000		100	900	설계중	군도9호선	국고 50%
30	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.58km B=8.0m	1,400	600		800	설계중	삼기 203 (석라선)
31	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=24.0m	5,000	600	500	3,900	설계중	군도2호
32	백제왕도탐방로 (익산토성)조성공사	L=1.74km B=5.0m	1,355		70	1,285	설계중
33	시도31호 도로확포장사업	삼기하이패스IC타당성조사용역	70		70		용역중

2		군도23호선 도로확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기 일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 4.

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=20.5m (2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 12,500백만원(공사비 9,000 보상비 3,100 기타 400)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기 투자	2020년	2021년 이후	비고
시비	12,500	11,500	-	1,000

□ 추 진 실 적

◦ 지방재정 투자심사	: 2013.  6.  4.

◦ 실시설계 및 도시계획시설결정 용역	: 2013. 7.~2015. 1.

◦ 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시	: 2015.  6. 15.

◦ 실시계획인가 고시(익산시 고시 제 2016-4호)	: 2016.  1.  8.

◦ 토지보상 공람공고 및 감정평가	: 2016.  1. ~ 6.

◦ 토지 및 지장물 손실보상	: 2016.  6. ~ 현재

◦ 공사 착공	: 2018.  5. 28.

◦ 공사 추진(공정율 85%)	: 2018.  5. ~ 현재

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공	: 2021. 4.

3		평화육교 재가설 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2021. 6.

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=365m(4차로 ⇒ 6차로)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상

◦ 총사업비 : 53,043백만원(국비 30,700  시비 22,343)

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년이후	비고
계	53,043	45,705	2,100	5,238
국 비	30,700	28,600	2,100	-
시 비	22,343	17,105	-	5,238

□ 추 진 실 적

◦ 기재부 총사업비 승인	: 2015.  4.  6.

◦ 기본 및 실시설계 용역	: 2015. 11.~2017. 1.

◦ 공사 착공	: 2017.  7. 18.

◦ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2017.  9. ~ 현재

◦ 평화육교 재가설공사 추진	: 2017.  7. ~ 현재

▸대체우회도로 설치(4차로)	: 2018.  4. ~ 7.

▸평화육교 철거(전면통제 2018.7.~2019.12.)	: 2018.  7. ~ 9.

▸공사 추진(공정율 71%)	: 2018. 10. ~ 현재

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공	: 2021.  6.

4		왕궁천 하천 환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리(보석박물관)~춘포면 천동리(익산천 합류점)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 47,368백만원(설계 827, 공사 37,754, 감리 2,265, 보상 5,000, 기타 1,522)

(단위 : ㎞, 백만원)

구 분	위 치	연장	사업비	내용
	합 계	9.25	47,368	축제, 보축, 교량재가설(9)
1지구	익산천 합류점 ~ 흥암교	4.62	23,693	축제, 보축, 교량재가설(5)
2지구	흥암교 ~ 보석박물관	4.63	23,675	축제, 보축, 교량재가설(4)

□ 추 진 실 적

◦ 왕궁천(1지구) 공사 추진

▸흥암교 기존 교량 철거 및 재가설 중

-2차분 준공	: 2020.  8. 15.

◦ 왕궁천(2지구) 공사 추진

▸1차분 공사 중

-왕궁천 상류(보석박물관 옆) 호안 설치

□ 마무리 대책

◦ 왕궁천(1·2지구) 공사 추진	: 2022. 준공예정

▸미보상필지 토지수용재결 병행 추진(보상율 88%)

5		동면천 하천 환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2023년

◦ 사 업 비 : 15,489백만원(설계 800, 보상 1,000, 공사 13,000, 감리 200, 기타 489)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km

▸제방축조 및 보축, 교량 재가설(7개소) 등

□ 추 진 실 적

◦ 관계기관 협의(전라북도, 농어촌공사)	: 2020.  6. ~ 7.

◦ 소규모 환경영향평가 완료	: 2020.  9. 19.

◦ 편입토지 분할측량 완료	: 2020.  9. 24.

□ 마무리 대책

◦ 실시설계 협의(2차, 전라북도)	: 2020. 10.

◦ 편입토지 감정평가	: 2020. 10.

◦ 편입토지 협의보상 추진	: 2020. 11.

◦ 건설기술심의(전라북도)	: 2020. 11.

◦ 실시설계 완료	: 2020. 12.

(2021. 6월중 건설사업관리용역 및 시설공사 착공)

6		소하천 정비사업(동산천, 닭작골천)

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
동산천 소하천정비공사	웅포면 맹산리 일원	2018. ~ 2021.	3,210 (2020년 지방이양) ▸2020년 : 1,597 (905 → 1,597, 증692)	소하천정비 L=1.018km
닭작골천 소하천정비공사	여산면 여산리 일원	2019. ~ 2022.	3,902 (2020년 지방이양) ▸2020년 : 0 (372 → 0, △372)	소하천정비 L=1.4km

□ 추 진 실 적

【 동 산 천 】

◦ 2차분 공종변경(후속 공종 반영)	: 2020.  8. 18.

▸예산추가확보(3회 추경)에 따른 공종물량 증(돌쌓기, 교량공 등)

【 닭작골천 】

◦ 관리부서 이관(건설과 → 시민안전과)	: 2020.  6. 24.

▸‘2021년 풍수해 생활권 종합정비사업’ 선정에 따른 관리부서 이관

□ 마무리 대책

◦ 동산천 준공(2차분) 및 착공(3차분)	: 2020. 12.

◦ 동산천 전체분 준공	: 2021.  2.

7		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 11,350백만원(국비 10,000 시비 1,350 토지매입비)

◦ 사업내용 : 13,814㎡[지하 1층, 지상2층/연면적 1,686㎡]

◦ 시설현황 : 다목적실, 로비, 사무실, 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강 신탁지구 하천정비사업에 포함)

□ 추 진 실 적

◦ 토지수용 재결에 따른 보상금 공탁, 소유권이전, 이의재결 완료	: 2020.  3. ~ 8.

▸공탁(토지 2필지, 지장물 보상비 및 영업보상비)

▸상반기 629백만원 지출(총 보상비 1,350백만원 중 1,302백만원 지출)

▸중토위 수용 이의재결 보상금 상승분 공탁(3인-13백만원) 완료

▸(목천동 1183-37 고**, 1183-40 문**)2가구에 대한 이사비 등 미지출

◦ 건축 및 토목 등 공사 추진(익산지방국토관리청)	: 2019. 12.~2021. 6.

▸시공회사 : 고려종합건설(주), 감리사 : ㈜삼안

▸공정/공정률 : 토목, 건축 기초공사 중 / 10%

◦ 건축물 내 콘텐츠관련 시공사 선정(익산지방국토관리청)	: 2020.  7. ~ 9.

※ 협상에 의한 계약으로 진행 중으로 우선 대상자와 협상 진행 중

□ 마무리 대책

◦ 건축 및 토목 등 공사 추진(익산지방국토관리청)	: 2019. 12.~2021. 6.

◦ 건축물 내 콘텐츠관련 공사 추진(익산청)	: 2020. 10.~2021. 6.

◦ 만경강문화관 관리·운영(익산시)	: 2021.  7. ~

8		도로조명 개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사업예산 : 1,059백만원

◦ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행 불편지역 도로조명 보수 및 설치

(단위 : 백만원)

구 분	세 부 사 업	사 업 개 요	예 산	비고
합 계		13개 사업	1,059
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업(견문보고)	보안등 신규설치 92개소	98
	생활환경개선사업(소규모 주민숙원 사업)	보안등 신규설치 104개소	118
	왕궁유적전시관 인근 보안등 설치	보안등 신규설치 10개소	10
노 후 가 로 등 정 비	도심지역 가로등 유지보수	고장 가로등 정비 120개소	120
	산업단지 가로등 유지보수	가로등 보수 60개소	60
	가로등 노후 점멸기 교체공사	노후 점멸기 교체 5개소	23
	읍 면 지역 보안등 보수	읍 면지역 고장 보안등 수리	120
	동 지역 보안등 보수	동 지역 고장 보안등 수리	78
	노후 보안등 기구 교체	노후 보안등 기구 교체	42
	전기안전점검부적합보수단가	점검부적합보수 300개소	30
	도심지역노후가로등교체공사	노후 가로등 정비 1식	100
	노후가로등LED교체공사	LED등기구 교체 1식	100
	산업단지 조도 개선공사	램프(안정기)교체 1식	90
	금마7공수~상제사거리 노후가로등 교체공사	노후가로등 정비 1식	40	3회추경
	영등동 가로환경 가로등 정비사업 실시설계용역	실시설계용역 1식	30	3회추경

□ 추 진 실 적

◦ 보안등신규설치

▸보안등 설치공사 추진	: 2020.  1. ~ 9.

-관내 보안등 203개소 신규설치(180백만원 집행)

◦ 노후가로등정비

▸노후가로등 정비공사 추진	: 2020.  1. ~ 9.

-관내 노후가로등 보수, 교체 등(767백만원 집행)

□ 마무리 대책

◦ 보안등신규설치 및 노후가로등정비 잔여사업 추진	: 2020. 10. ~ 12.