2020. 10. 19.

제231회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 결산보고

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예산집행실적
□	2020 주 요 성 과
□	2020 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	하수관로정비사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전 정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지 조성

일  반  현  황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	6	6	7	5
현 원	25	1	9	7	-	8
증 감			3	1	▵7	3

□ 사 무 분 장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과, 온천지구 지정 및 관리

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2019. 12.	비 고
시설	총인구	천명	288
	하수인구	천명	270
	보급률	%	93.8
하수처리	1일평균하수발생량	톤	115,602
	1일평균하수처리량	톤	112,836
	하수처리율	%	97.61
하수도 사용	개소수	전	40,180
	톤당 평균요금	원	737.22

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	29	150,061㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	관리대행 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	21	1,711㎥/일	〃
제3일반산업단지 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	〃

2020 예산집행실적

【 2020. 9. 30. 현재 】                                    (단위 : 천원, %)

부서	관	항	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
하수도과				84,537,921	54,176,967	30,360,954	64.1
	하수도사업비용			38,232,511	30,007,031	8,225,480	78.5
		영업비용		37,992,511	29,938,346	8,054,165	78.8
			관거비	15,182,704	12,262,804	2,919,900	80.8	06,09BTL 분기별지급
			처리장비	19,949,084	15,693,373	4,255,711	78.7	하수처리시설민간위탁금 및 BTO운영비
			일반관리비	2,860,723	1,982,169	878,554	69.3	보수 및 일반운영비 등
		특별손실		90,000	68,685	21,315	76.3
			기타특별손실	90,000	68,685	21,315	76.3	(구)분뇨처리장 철거비 (사업완료)
		예비비		150,000	0	150,000	0.0
	자본적지출			46,305,410	24,169,936	22,135,474	52.2
		유형자산취득		43,370,210	23,496,533	19,873,677	54.2
			구축물	41,832,913	22,993,835	18,839,078	55.0	계속비 :11,212,699 건설개량 : 745,485 사고 : 2,426,721 국가산단노후관로 선금 (11월 예정)
			기계장치	588,000	291,289	296,711	49.5	기술진단개선사항 및 처리시설 개보수비
			차량운반구	47,697	47,697	0	100.0	노후차량 교체비용
			공기구비품	391,600	5,341	386,259	1.4	TOC측정기구입 (11월 집행예정)
			건설중인자산	510,000	158,371	351,629	31.1	건설개량:70,000 유천생태습지 및 시민의숲 성토
		비가동설비자산취득		1,370,000	671,324	698,676	49.0
			건설중인자산	1,370,000	671,324	698,676	49.0	차집관로보수 (12월 준공예정)
		기타자본적지출		1,315,200	2,079	1,313,121	0.2
			정부보조금반환	1,315,200	2,079	1,313,121	0.2	천서왕궁지구 국고보조사업 정산중 (12월 집행예정)
		예비비		250,000	0	250,000	0.0

2020 주요성과

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

▸남부2·3,북부2처리분구 하수관로 정비공사 추진

- 관로정비 14.4km, 배수설비 632개소 (공정률 34.6%)

▸남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 추진

▸북부1처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 추진

▸황등리 배수설비 설치공사 외 4건

- 배수설비 20개소 설치완료

◦ 하수찌꺼기 감량화 사업 추진을 위한 재원협의 완료 및 시설공사 착공

▸사업비(58.24억원) 추가확보 및 여름철 악취저감을 우선으로 한 공사 실시

◦ 공공하수처리장 기능보강 등 효율적 관리를 통한 수질환경개선

▸여산하수 외 15개소 기능보강공사 및 여산하수 기술진단 실시

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

▸소규모 숙원사업 및 주민예산편성사업 91건 완료

▸침수우려지역 및 상가밀집지역 하수도(L=65km) 기계준설 완료

▸생활민원 처리를 위한 비상근무조 운영 : 2,113건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 중앙동 등 구도심지역 배수설비 설치공사시 옥내위치 및 위치불명 정화조에 대하여 시공여건과 건물 소유주와의 비용분담 등의 협의 어려움으로 일부 미설치

2020 주요업무 결산

	□	남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 익산시 하수도정비 기본계획 수립용역 하수찌꺼기 감량화 사업 공공하수처리시설 운영관리 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 소규모 하수도관련 주민숙원사업

1		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 :  남부2처리분구 (동산동 · 인화동 · 평화동 일부)

남부3처리분구 (금강동 · 신흥동 · 용제동 일부)

북부2처리분구 (영등1동 · 영등2동 · 신용동 일부)

◦ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2022. 5.

◦ 총사업비 : 36,490백만원(국비 25,543, 도비 1,095, 시비 9,852)

▸ 2020년 사업비 : 1,447백만원(국비 1,013  도비 43  시비 391)

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=30.5km, 배수설비 2,616가구

□ 추 진 실 적

◦ 건설사업관리용역 착수 [(주)삼안]	: 2019. 05. 31.

◦ 시설공사 1차분 착공 [(주)성지건설]	: 2019. 05. 29.

◦ 시설공사 1차분 준공	: 2020. 05. 27.

◦ 시설공사 2차분 착공	: 2020. 03. 16.

※ 2020. 9월말 현재 공정률 : 34.6%

□ 마무리 계획

◦ 시설공사 시행	: 2019. 05. ~ 2022. 05.

◦ 건설사업관리 용역 시행	: 2019. 05. ~ 2022. 05.

◦ 하수도사용개시 및 국비정산 보고	: 2023. 01.  ~ 2023. 03.

2		익산시 하수도정비 기본계획 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2021. 12.

◦ 총사업비 : 1,700백만원 (시비)

▸ 2020년 사업비 : 900백만원

◦ 사업내용 : 개발여건 변화에 따른 하수처리구역 확대검토, 공공하수처리장 증설검토, 소규모 공공하수처리장 신·증설 계획 검토 등

□ 추 진 실 적

◦ 기본계획수립용역 익산시 계약심사	: 2019. 02. 21.

◦ 기본계획수립용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 05. 14.

◦ 기본계획수립용역 착수 [㈜유신]	: 2019. 07. 30.

※ 2020. 9월말 현재 공정률 : 90.0%

□ 마무리 계획

◦ 하수도정비기본계획(안) 승인 협의	: 2020. 10. ~ 2021. 10(예상)

※ 전라북도 새만금수질개선과, 전북지방환경청 환경관리과

◦ 하수도정비기본계획(안) 승인  [환경부]	: 2021. 하반기 중 (예상)

3		하수찌꺼기 감량화사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

◦ 총사업비 : 26,844백만원(국비70%, 도비15%, 시비13%, 기금2%)

▸ 2020년 사업비 : 15,293백만원(국비10,705  도비2,294  시비1,969  기금325)

◦ 사업내용

▸ 소화조 개선, 전처리설비 교체, 탈황설비 및 가스저장탱크 교체 등

▸ 소화조(6,692㎥/일), 탈취시설, 기계식 농축시설, 가스 정제설비 등 신설

□ 추 진 실 적

◦ 시설공사(토목‧건축‧기계) 2차분 착공	: 2020. 04. 27.

◦ 전기공사 2차분 착공	: 2020. 05. 11.

◦ 전기공사 1차분 준공	: 2020. 05. 18.

◦ 분뇨저류조 및 농축조 준설슬러지 폐기물처리용역 완료	: 2020. 06. 02.

◦ 기존 구조물(소화조) 안전진단용역 완료	: 2020. 06. 14.

◦ 기존 탈수기동 석면 폐기물처리용역 완료	: 2020. 07. 13.

◦ 시설공사(토목‧건축‧기계) 1차분 준공	: 2020. 07. 17.

◦ 감량화사업 관급자재(공법사) 2차분 계약	: 2020. 09. 08.

□ 마무리 계획

◦ 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업 준공	: 2022. 02. 28

4		공공하수처리시설 운영관리

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소

하수처리시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	13개소
운영방식	•위탁운영 : (주)전북엔비텍BTO (2008.~2028.)

※ 2020년 BTO위탁운영비 예산 : 155억원(도비 5.9억원 시비 149억원)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개 항목)

▸실험실 자가측정(일1회), 수질TMS 자동측정(시간당)

◦ 익산공공하수처리장 차집관로 보수 실시	: 2020. 01. ~ 12.

▸1-2라인 시점부(1중계펌프장),  2-1라인(농업실용화재단 인근) 보수완료

◦ 익산공공하수 및 금강분뇨 악취기술진단 실시	: 2020. 09. ~ 12.

◦ 북부, 함열, 금마공공하수 악취기술진단 완료	: 2020. 07. 07.

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 기준 준수(부지경계, 탈취기 배출구)

▸익산공공하수처리장 등 4개 처리시설 1, 2, 3분기 완료

◦ 익산하수 3중계 조목스크린 등 설치공사 완료	: 2020. 07. 28.

◦ 익산공공하수처리시설 내진성능평가 용역 실시	: 2020. 09. ~ 2021. 02.

□ 마무리 계획

◦ 공공하폐수처리시설 TOC측정기기 설치 완료	: 2020. 12.

◦ 익산공공하수처리장 차집관로 보수 완료	: 2020. 12.

▸1-2라인(고속철교 교량 밑), 2-1라인(군산선 철도인근)

5		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 24개소

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 21개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량 (㎥/일)	600	1,711	84개소	5,500	5,000	4개소
운영방식	•위탁운영 : 환경시설관리(주), (유)대신환경개발 •위탁기간 : 2020. ~ 2022.

※ 2020년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비 예산 : 27.8억원

□ 추 진 실 적

◦ 공공하·폐수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개 항목)

▸ 공공하·폐수처리시설 및 중계펌프장 운영(주 4~5회 수시점검)

처리용량	개소	하·폐수처리시설명	점검주기
500㎥/일 이상	3	제3산단 폐수, 국가식품 폐수, 여산하수	일 1회
50㎥/일 이상 500㎥/일 미만	12	오산문화 소규모 하수 외 11개소	주 1회
50㎥/일 미만	9	왕궁연정 소규모 하수 외 8개소	월 1회

◦ 공공하·폐수처리시설 시설 개보수를 통한 효율 증대	: 2020. 01.~ 09.

▸ 동산유천 공공하수처리시설 펌프 교체 등(17건) 완료

◦ 공공하·폐수처리시설 원격감시제어 시스템 구축 시행	: 2020. 06. 25.

◦ 소규모 하수처리시설 기술진단 개선공사 착수	: 2020. 09. 07.

◦ 여산 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역 시행	: 2020. 09. 28.

□ 마무리 계획

◦ 소규모하수 기술진단 개선공사 완료(웅포맹산 외 3개소)	: 2020. 11.

◦ 공공하·폐수처리시설 원격감시제어 시스템 구축 완료	: 2020. 12.

◦ 공공하·폐수처리시설 시설 개·보수 공사 완료	: 2020. 12.

6		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 제1국가산업단지 일원(약40만평)

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2022. 12.(4개년)

◦ 사 업 량 : 노후하수관로 정비 L=21.4km

◦ 총사업비 : 15,077백만원(국비 7,538.5 도비 753.8 시비 6,784.2)

※ 2020년 사업비 : 1,000백만원(국비 500 도비 50 시비 450)

□ 추 진 실 적

◦ 국가산업단지 하수관로 기술진단 실시	: 2019. 04.

◦ 2020년 신규 국고보조사업 확정	: 2019. 09.

◦ 실시설계 착수(공정률 97%)	: 2019. 10.

◦ 경제성(VE) 검토 용역 완료	: 2020. 08.

◦ 기술자문위원회 개최	: 2020. 09.

□ 마무리 계획

◦ 재원협의(환경부) 추진	: 2020. 10. ~ 11.

◦ 원가심사(전북도청) 추진	: 2020. 11.

◦ 공사 발주	: 2020. 12.

◦ 건설사업관리용역(감리) 선정 PQ 추진	: 2021. 01. ~ 02.

7		소규모 하수도 관련 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 비 : 3,050백만원

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사업내용

▸ 시민생활에 불편한 하수도 슬러지 준설, 하수관로 개선, 맨홀단차 등 생활의 불편을 주는 민원에 대하여 주민숙원사업 처리

◦ 세부사업 (총103건 / 3,050백만원)

▸ 소규모 주민 숙원 사업	: 74건 / 2,798백만원

▸ 읍면동 주민예산편성사업	: 29건 /   252백만원

□ 추 진 실 적

◦ 소규모 주민숙원사업	: 2020. 1. ~ 9.

▸ 읍면동지역 하수도 시설공사: 45건 / 1,591백만원

▸ 읍면동지역 하수도 준설공사 추진: 13건 /  500백만원

▸ 하수도맨홀 단차 보수공사 추진	: 4건 / 188백만원

◦ 읍면동 주민예산편성사업	: 2020. 1. ~ 9.

▸ 함열읍 중촌마을 외 10개소 배수관 신설공사 : 11건 / 152백만원

▸ 성다면 외갈마을 외 17개소 배수로 정비공사 : 18건 / 100백만원

□ 마무리 계획

◦ 소규모 주민숙원사업 추진	: 2020. 10. ~ 12.

▸ 읍면동 하수도 시설공사 및 하수도 슬러지 준설 등(8건 / 319백만원)

▸ 송학동 하수관로 정비사업 외 3건(4건 / 200백만원)