2021. 1.

제233회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 계획

	국가식품클러스터담당관

국가식품클러스터담당관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 주 요 성 과
□	2021 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
국가식품클러스터, 첨단 식품산업 메카로 지원⸱육성

		전 략 목 표
◦ ◦	국가식품클러스터 본격 활성화 국내․외 유수기업 및 연구소 유치

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	기업활동에 적합한 기반시설 및 신규 혁신 인프라 확충 전략적인 맞춤형 투자유치 활동 전개 기업 준공 가속화에 따른 맞춤형 기업지원 강화

일   반   현   황

□ 기       구

					국가식품클러스터담당관
식품인력계			기업유치계					농산물지원계				산단조성계

□ 정 ․ 현 원 (2021.1.4.기준)

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	14	1	4	4	4	1
현 원	14	1	4	4	1	4
증 감	0	0	0	0	△3	3

□ 사 무 분 장

◦ 식품인력	:	국가식품클러스터 기획조정, 신규사업 발굴 및 국가예산확보, 식품인력 수급 정책, 기능성식품 제형센터 건립․운영, 한국식품산업클러스터진흥원․기업지원시설 운영 관리, 대ㆍ내외 교류협력 사업 추진, 외국인투자지역 관리․운영
◦ 기업유치	:	국내외 식품기업 및 연구소 투자 유치, 산학연 교류 협력 지원, 홈페이지 관리, 국내․외 홍보전략 수립, 국가식품클러스터 홍보
◦ 농산물지원	:	국가식품클러스터 농산물 공급 지원 총괄 기획 및 조정, 농식품원료 중계․공급센터 구축 및 운영, 식품산업 육성사업 추진 기업 및 기술지원 사업, 지역식품산업 육성 및 관리
◦ 산단조성	:	식품전문산업단지 조성지원, 산업단지 기반시설 확충, 소스산업화센터 건립․운영, 기업지원시설 장비구축, 배후복합도시 및 2단계 조성, 복합문화센터 건립

2020 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 맞춤형 투자유치 활동으로 분양계약 체결                    : 15개사 145천㎡

◦ 기업비즈니스 지원(물류마케팅, K-푸드마켓, 소비자 교류지원)    : 103개사

◦ 기업기술 지원 사업

▸식품 혁신성장 기술 지원 : 83개사 92건(제이웰푸드, 다고내푸드, 진성바이오 등)

▸장비활용 지원 : 242개사 7,424건(입주기업 : 105개사 3,186건)

◦ 입주기업 인력수급 지원                                     : 104개사 457명

▸취업인턴(46개사 161명), 지역주도형 일자리(27개사 59명),

입주기업 취업연계(30개사 226명), 대학생 단기인턴(1개사 11명)

◦ 농식품 원료 중계․공급센터 부지매입                        : ‘20. 5. 7.

◦ 기능성식품 제형센터 부지매입                               : ‘20. 6. 30.

◦ 국가식품클러스터 입주기업 지원사업 추진(12월말 기준)

▸교 통 수 당 : 327,500천원(40개사 316명, 누적 3,275명)

▸기숙사 임차비 :  50,908천원(15개사 20명, 누적 191명)

◦ 익산온라인식품대전	: ‘20.9.4. ~ 9.10.

▸누적 접속자수 : 270,235건, 기획전 판매실적 : 120.3백만원

▸온라인 수출상담회 현장계약 : 306백만원    *상담액 4,993백만원

◦ 국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구용역 착수           : ‘20. 5. 13.

◦ 산업단지 개발계획 변경(7차) 승인⸱고시(국토부)                : ‘20. 9. 2.

□ 반      성

◦ 대기업 유치 성과 미약

▸수도권 규제 완화, 물류비 등으로 대기업의 지방투자 기피

⇒중앙정부, 전북도, 진흥원과 공조하여 대기업 유치 활동에 주력

2021 주요업무계획

		투자유치 활 동 강화
		기업비즈니스지원활성화
		기업기술지원
		농식품원료 중계⸱공급센터 건립
		기능성식품 제형센터 건립
		기능성 원료은행 구축
		청년식품 창업허브 구축
		국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구
		국가식품클러스터 복합문화센터 건립
		식품산업(농식품기업 등) 육성 지원
		입주기업 지원사업(교통수당, 기숙사 임차비)

1		투자유치 활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 1,820백만원(국비 1,638, 도비 55, 시비 127)

◦ 사업내용 : 국내‧외 투자유치 활동(투자상담, 투자컨설팅단 운영, 투자설명회 등)

◦ 분양현황 : 95개사

[단위 : 천㎡(천평), %]

총면적	분 양		미분양	비고
	면 적	비 율	면 적
1,141(345)	709(214)	62.1	432(131)	2021. 1. 4. 기준 (준공 45개사, 착공 18개사)

□ 추 진 계 획

◦ 맞춤형 방문 및 초청 투자유치 활동 전개

▸ Target 기업별 최적화 채널 활용한 1:1 미팅, 초청 투자상담 등을 통한 신규 투자 수요 발굴, 전략적인 품목‧업종별 동종기업 유치 등 추진

◦ 국내 투자컨설팅단 운영

▸ 네트워크 중심의 신규 투자수요 발굴 및 투자유치 컨설팅 대응체계  강화를 위한 다양한 분야 외부전문가 활용

◦ 국내 투자설명회 개최

▸ 국내외 주요 식품기업 대상 국가식품클러스터 잠재투자자 발굴 및   투자유치 네트워크 구축

□ 기 대 효 과

◦ 맞춤형‧전략적 투자유치 활동으로 실질적 투자수요 발굴 및 투자 유치 연계

2		기업비즈니스 지원 활성화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 3,036백만원(국비 2,732, 도비 91, 시비 213)

◦ 사업내용 : 기업성장지원, 마케팅ㆍ판매지원, 벤처창업 활성화 지원

□ 추 진 계 획

◦ 기업성장 지원 (식품기업 일자리 지원, 입주기업 활성화 지원)

▸ 신규채용 및 고용유지를 위한 일자리 지원을 통해 기업의 경영 부담을 완화하고 양질의 일자리 창출

▸ 관계기관 및 협의회 구성을 통한 인력 매칭으로 중장기적인 인력 지원

▸ 온오프 비즈니스상담소를 통한 기업애로사항 해소 및 입주기업 간 상생 협력을 위한 워크숍 개최

◦ 마케팅‧판매지원 (물류ㆍ마케팅지원, 비즈니스플랫폼, 소비자교류지원)

▸ 입주기업 맞춤형 물류컨설팅 지원을 통해 물류 효율화 촉진

▸ 온오프라인 전시·판매 지원을 통한 기업제품 홍보 및 통합마케팅 지원

▸ 현장박람회 개최를 통한 소비자 교류 및 입주기업 제품 홍보 지원

◦ 벤처창업 활성화 지원(식품벤처센터 입주기업 활성화, 청년식품창업Lab운영)

▸ 첨단시설․장비․전문가를 활용하여 식품창업의 전 과정을 체계적으로 지원

▸ 벤처기업 인증지원을 통한 경쟁력 강화로 강소기업 성장기반 마련

▸ 식품벤처센터 입주기업 중 핵심기술(제품)을 보유한 유망기업을 집중적으로 육성하여 단계별 육성체계 구축

□ 기 대 효 과

◦ 입주기업의 원활한 인력수급 지원 및 기업 애로사항에 즉각 대응 가능한  시스템 구축으로 기업 경영 안정화를 도모하고 일자리 창출에 기여

◦ 맞춤형 판로유통 및 기술개발 지원으로 기업 매출 증대 및 경쟁력 향상

3		기업기술 지원

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 4,770백만원(국비 4,293, 도비 143, 시비 334)

◦ 사업내용 : 기업기술력 확보지원, 산학연 네트워크 활성화

□ 추 진 계 획

◦ 기업 기술력 확보 지원 (식품 혁신성장 기술지원, 개방형실험실 및 인력양성 지원)

▸ 국가 식품산업 발전을 위한 전국 식품기업 기술지원 체계 구축

▸ 기업 제품개발 기술력 확보 및 상품화 검증, 신제품개발 지원을 통한 기업 경쟁력 강화 및 매출 증대 지원

▸ 기술지원 인력(시험·분석), 장비(시험·분석, 생산)를 입주기업 및 식품관련 기업(기관) 등에서 공동활용 하도록 지원하여 기업경쟁력 향상 기반 마련

◦ 산학연 네트워크 활성화(산학연 플러스 지원, 해외클러스터교류협력, 인증획득 및 운영)

▸ 분야별(기능성‧품질안전‧패키징‧파일럿) 전문가 협의체 구성 및 운영을  통한 국내외 최신정보 제공

▸ 식품 학회‧협회 등을 활용한 기술세미나 개최 및 네트워크 확대

▸ 국제컨퍼런스 및 DLG(독일농업협회) 국제식품품평회 개최를 통한 대외적 홍보

▸ GLP 및 AAALAC-I (국제실험동물관리평가인증협회) 인증 취득, 시험·검사기관 인증확대 및 유지

□ 기 대 효 과

◦ 기술개발 지원 및 장비 활용 지원을 통해 기업 경쟁력 강화 및 매출 증대 지원

4		농식품원료 중계⸱공급센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내

◦ 사 업 비 : 19,500백만원(국비)       - 부지매입비 별도(3,466백만원, 시비)

◦ 규    모 : 건축 9,816.06㎡(2,969평), 부지 24,426㎡(7,389평)

▸ 주요시설 : 보관창고(냉장, 냉동, 상온), 사무실 등

◦ 사업내용

▸ 농식품원료 중계·공급센터 설계 용역 (1,000백만원 / 2019년 ~ 2020년)

▸ 농식품원료 중계·공급센터 구축 (18,500백만원 / 2020년 ~ 2021년)

◦ 시행기관 : 농림축산식품부, 전라북도, 익산시, 한국식품산업클러스터진흥원

□ 추 진 계 획

◦ 농식품 원료 중계·공급센터 건립 공사 추진	: ‘20. 12. ~ ‘21. 11.
◦ 운영테스트 및 건축물 인수인계	: ‘21. 11. ~ ‘21. 12..
◦ 농식품 원료 중계·공급센터 운영	: ‘22. 상반기

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 입주기업이 필요로 하는 원재료를 연중 안정적으로 공급하여 기업 경쟁력 확보

◦ 지역농산물 중계 기지의 역할을 효과적으로 수행하여 농가소득 증대

◦ 국내(지역) 농산물과 연계 공급 확대, 농식품 수출 증대, 일자리 창출 등 공익적기능 강화로 지역경제 활성화

5		기능성식품 제형센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(왕궁면 광암리 1427)

◦ 사 업 비 : 17,640백만원(국비)         - 부지매입비 별도(660백만원, 시비)

◦ 규    모 : 부지 3,959.6㎡(1,200평), 건축연면적 4,060㎡(1,230평)

▸ 주요시설 : 일반제형실, 특수제형실, 제형품질검사실, 연구실 등

◦ 사업내용

▸ 기능성식품 제형센터 설계용역 (1,000백만원 / 2019년)

▸ 기능성식품 제형센터 건립 (11,290백만원 / 2020년 ~ 2021년)

▸ 기능성식품 제형센터 장비 구축 (5,350백만원 / 2020년 ~ 2022년)

◦ 시행기관 : 농림축산식품부, 전북도, 익산시, 한국식품산업클러스터진흥원

□ 추 진 계 획

◦ 기능성식품 제형센터 건립공사 추진           : ‘20. 12. ~ ‘22. 3.

◦ 시설ㆍ장비 도입                             : ‘20. 12. ~ ‘22. 6.

□ 기 대 효 과

◦ 제형기술 플랫폼을 통한 농생명 원료의 고부가가치 창출 기반 구축

◦ 중소기업의 강소기업 육성을 통한 국내 식품산업 역량강화 및 글로벌 경쟁력 제고

6		기능성 원료은행 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내

◦ 사 업 비 : 15,000백만원(국비 10,500, 도비 1,350, 시비 3,150)

◦ 규    모 : 건축 600㎡, 연면적 1,800㎡(지상 3층 예정)

◦ 사업내용 : 기능성 원료은행의 건축, 생산설비, 연구장비 등

▸ (원료개발) 신규 기능성 원료 발굴 및 기능성 규명

▸ (원료표준화) 기능성원료 표준화를 위한 제조공정 확립 및 생산

▸ (보관/분양) 표준화된 원료(또는 기능성분) 보관 및 공급

◦ 재정투자심사 의뢰(도심사)	: ‘21. 상반기
◦ 중기지방재정계획 반영	: ‘21. 상반기
◦ 설계 공모, 기본 및 실시설계 용역	: ‘21. 1. ~ ‘22. 1.
◦ 건설공사 추진	: ‘22. ~ ‘23.
◦ 장비 구축	: ‘22. ~ ‘23.
◦ 기능성 원료은행 운영	: ‘24. 상반기 ~

□ 추 진 계 획

□ 기 대 효 과

◦ 안정적인 국산 원료생산 및 공급체계 구축으로 기능성 원료 국산화와 농업과 식품산업 연계를 통한 상생 방안 마련

◦ 기업 맞춤형 기능성 원료 및 정보제공, 지속적인 국산 기능성 원료 발굴로 신성장 식품산업 육성

7		청년식품 창업허브 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)

◦ 사업위치 : 익산시 왕궁면 광암리 1427-1번지(산업단지 내)

◦ 총사업비 : 26,644백만원(국비)         - 부지매입비 별도(1,575백만원, 시비)

◦ 규    모 : 부지 9,544.3㎡(2,887평), 건축연면적 9,317.36㎡(2,818평)

▸ 주요시설 : 학습 및 체험공간, 커뮤니케이션 공간, 시제품 제작공간, 창업공간 등

◦ 시행기관 : 농림축산식품부, 전북도, 익산시, 한국식품산업클러스터진흥원

□ 추 진 계 획

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                    : ‘20. 10. ~ ‘21. 10.

◦ 부지매입                                      : ‘21. 상반기

◦ 건립공사 및 감리용역 수행                     : ‘21. 12. ~ ‘23. 10.

◦ 시설‧장비 도입                                : ‘22. 10. ~ ‘23. 10.

◦ 시험운전 및 운영준비                          : ‘23. 10. ~ ‘23. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 농식품기반 창업의 全과정을 지원할 수 있는 플랫폼 구축

◦ 유망 식품벤처기업을 발굴 육성함으로써 국가식품클러스터의 투자유치  가속화 및 일자리 창출 기여

◦ 국내 유수의 식품관련 기업, 인재, 산학연 등 식품생태계 활성화를     통해 시너지 효과 극대화 및 지역발전 도모

8		국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구

□ 사 업 개 요

◦ 용 역 명 : 국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구

◦ 용역기간 : 2020년 5월 ~ 2021년 6월

◦ 용 역 비 : 300백만원(도 100, 시 200)

◦ 주요내용 : 국가식품클러스터 1단계 역량강화, 집적화, 기능보강 및 산업단지 확장 개별사업 발굴 및 산업단지 확장 타당성 등

□ 추 진 계 획

◦ 국가식품클러스터 종합계획 재정비용역 준공(진흥원)     : ‘21. 2.

◦ 국가식품클러스터 종합계획 재수립(농식품부)            : ‘21. 3. ~ 5.

◦ 국가식품클러스터 활성화 용역 재착수                   : ‘21. 5.

▸ 자문회의(2회), 최종보고회

◦ 국가식품클러스터 활성화 용역 준공                    : ‘21. 6.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 2단계 사업 조기 추진을 위한 방안 마련으로 국가식품클러스터 경쟁력 강화

◦ 국가식품클러스터 기업유치 촉진 및 지역경제 활성화를 위한 산업기반 확대로 일자리 창출과 인구증가 도모

9		국가식품클러스터 복합문화센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

◦ 사업위치 : 익산시 왕궁면 광암리 1426-1번지(산업단지 내)

◦ 총사업비 : 4,000백만원(도 2,000, 시 2,000)

▸ ‘21년 예산 : 2,400백만원(공사비)

◦ 사업규모 : 부지 2,271㎡(687평), 연면적 1,146.24㎡(347평) 정도

◦ 사업내용 : 입주 근로자 정주여건 개선을 위한 기타 편의시설 구축

▸ 카페테리아, 사무실, 세미나실, 카페, 전시판매장 등

□ 추 진 계 획

◦ 기본 및 실시설계 용역                         : ‘20. 12. ~ ‘21. 8.

◦ 조례 제정                                     : ‘21. 8.

◦ 공사추진                                      : ‘21. 10. ~ ‘22. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 내 부족한 편의·복지시설 등 복합공간 확충으로 근로자 복지환경 개선

◦ 국가식품클러스터 기업유치 촉진 및 고용창출 등을 통한 지역경제 활성화 도모

10		식품산업 (농식품기업 등) 육성 지원

□ 사 업 개 요

◦ 농식품기업 맞춤형지원사업

▸ 식품기업 경쟁력 제고를 위한 장비 개보수 및 설치, 연구개발 등 맞춤형 지원

- 사 업 비 : 410백만원(도비 205, 시비 82, 자부담 123)

- 지원대상 : 농업생산자단체(영농조합법인, 농업회사법인 등) 및 식품기업

◦ 익산식품대전

▸ 온⸱오프라인 전시, 기획전, NS쿡페스트 등 110개 부스 내외(예정)

- 사업위치 : 한국식품산업클러스터진흥원 및 온라인

- 사 업 비 : 300백만원(국비 250, 시비 50)

◦ 식품산업 육성지원

▸ 국가식품클러스터 농산물 공급 물류비, 식품박람회 참여업체 부스비, 식품기업 마케팅 활성화 지원 및 소규모 식품기업 포장재 및 컨테이너박스 지원

- 사 업 비 : 138.9백만원(시비 74, 자부담 64.9)

◦ 전통식품 마케팅 활성화 지원

▸ 전통식품(전통주 포함) 공동 마케팅 프로모션 및 활성화 지원 등

- 사 업 비 : 100백만원(도균특 50, 시비 30, 자부담 20)

- 지원대상 : 전통식품(전통주 포함) 등을 직접 제조⸱판매하는 업체

□ 추 진 계 획

◦ 사업계획수립, 공고 및 신청 접수                 : ‘21. 1.

◦ 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정              : ‘21. 1. ~ 2.

◦ 사업추진                                        : ‘21. 2. ~

◦ 사업비 정산 및 현장점검                         : ‘21. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 소규모 식품제조기업에 생산⸱마케팅 분야 지원으로 기업 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모

◦ 식품산업과 전후방산업(농업, 유통판매업 등) 관련자와의 비즈니스 연계로 농산물 소비 확대 및 농가소득 증대

11		입주기업 지원사업 (교통수당, 임차비)

□ 사 업 개 요

◦ 지원기간 : 2021년 2월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 410백만원(교통수당 330, 임차비 80)

◦ 사업내용

▸ (교통수당) 국가식품클러스터 산업단지 입주기업에 종사하고 익산시에 주소를 둔 근로자에게 월 10만원 지원

▸ (기숙사 임차비) 국가식품클러스터 산업단지 입주기업이 관내 공동주택을 임차하여 근로자에게 기숙사로 제공하는 경우 임차료(월세) 80%(최대 30만원)지원

□ 추 진 계 획

◦ 공고⸱접수 및 참여기업 심사⸱선정               : ‘21. 1.

◦ 협약체결(익산시 ↔ 참여기업)                  : ‘21. 2.

◦ 보조금 지원신청 및 지급                      : ‘21. 2. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 산업단지 근로자의 근무환경 개선으로 장기재직 유도 및 고용안정성 확보를 통한 국가식품클러스터 활성화 촉진

◦ 근로자 정주여건 개선 및 차별화된 인센티브로 인접시군으로 인구유출 방지 및 우리시 전입을 통한 인구증가 도모