2021. 1.

제233회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 계획

	건설국

도시재생과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 주요성과 및 반성
□	2021 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민 중심의 도시재생과 도시경쟁력 강화

		전 략 목 표
◦	구도심 지역의 도시기능 회복
◦	지역 균형 발전 기틀 마련

		중 점 과 제
◦	지속가능한 도시재생전략계획 마련
◦	원도심 재생을 통한 생활환경개선 및 지역활성화

일  반  현  황

□ 기          구

						도시재생과
	재 생 행 정						재 생 시 설						주 거 재 생

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	11		1	3	4	2	1
현 원	12		1	3	3	2	3
증 감	-		-	-	△1	-	2

□ 사  무  분  장

	◦	재생행정	:	도시재생 종합기획조정, 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립, 도시재생 뉴딜사업 국가공모사업 추진, 소규모 재생사업 공모 및 추진, 도시재생지원센터 운영
	◦	재생시설	:	도시재생 뉴딜사업 추진(역사가 문화로, 푸른솔 세대통합 행복마을, 독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈, 도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중), 도시재생현장지원센터 운영
	◦	주거재생	:	새뜰마을 사업 추진(모현동 옥창지구, 동산동 월담지구, 평화동 평화지구)

□ 위원회 현황

(단위 : 명)

위 원 회 명	위 원 장	위 원 수			비 고
		계	당연직	위촉직
원도심 활성화사업 위원회	부 시 장	15	4	11
도시재생 위원회	엄수원 교수	17	2	15

□ 도시재생활성화지역 지정 현황

권역	지역명		면적(㎡)	유형	지역특성	비고
A 원도심 역세권 재생권역	1	역사가(驛史街) 문화로(文化路)	185,007	근린재생형	원도심/전통시장/근대역사
	2	익산 KTX역 동편 원도심	1,200,000	근린재생형	원도심/전통시장/근대역사
	3	익산 KTX역 서편	613,000	근린재생형 (도시경제 기반형 가미)	KTX역/서부역사진입로
	4	송학동	423,000	근린재생형	개별아파트입지/변전소
	5	남부지구	906,000	근린재생형	버스터미널/준공업지역/위락시설
	6	동산동	483,000	근린재생형	단군성묘/동산새뜰마을
	7	인화마동	1,173,000	근린재생형	전통시장/하이트공장
	8	동부시장	1,379,000	근린재생형	동부시장/주공A/구획정리사업지구
	9	남중동	1,079,000	근린재생형	익산시청/모현우남A/행정업무시설
	10	모현동	1,046,000	근린재생형	노후아파트(모현우남A)/원광여중고
	11	신동	842,000	근린재생형	대학로/구획정리사업지구
	12	남부시장	115,000	근린재생형	근대역사/전통시장
	13	신청사	162,000	근린재생형	익산시청/여성회관/올림픽기념관
	14	팔봉동	588,000	근린재생형	준공업지역/이리신흥초
B 역사문화 재생권역	1	금마고도	1,095,000	근린재생형	고도지구/유네스코세계유산
C 농촌중심지 재생권역	1	함열	1,484,000	근린재생형	전통시장/읍소재지/공공기관

2020 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 2020년 도시재생 뉴딜사업 공모 선정

▸남중동 신청사지역 도시재생 뉴딜사업 선정(2020. 9.)

- 마중물 사업비 : 16,700백만원(국비 10,000 지방비 6,700)

- 행복주택, 생활속 어울림플랫폼, 상생협력상가 및 마당 등 조성

▸소규모재생 공모사업 선정(금마고도지역 98백만원, 함열지역 150백만원)

▸주민교육지원사업 선정(금마고도지역, 7백만원)

▸주민역량강화사업 선정(신청사지역, 20백만원)

◦ 도시재생 뉴딜사업으로 원도심 지역 활성화에 기여

▸중앙동 도시재생 뉴딜사업 추진

- 어울림센터, 중매서커뮤니티라운지, 음식/식품교육문화원 실시설계 추진

- 세대공감 복합커뮤니티시설 리모델링, 문화주차장 및 안전골목길 조성 완료 등

▸송학동 도시재생 뉴딜사업 추진

- 마을 안길정비, 상업 가로환경 정비, 공동체 텃밭 등 설계용역 시행

- 도시재생 거버넌스 구축(송학동 현장지원센터)

▸인화동 도시재생 뉴딜사업 추진

- 상생협력상가 및 상생마당 조성, 4.4만세운동 기념길·광장 정비 등 설계용역 시행

- 도시재생 거버넌스 구축(인화동 현장지원센터)

◦ 새뜰마을 사업 추진으로 생활인프라 확충 및 주거환경 개선 기여

▸평화동 평화지구 2020 신규 새뜰마을사업 공모 선정(2020. 3.)

- 총 사업비 : 4,134백만원(국비 2,894 도비 372 시비 868)

- 평화동 평화지구 마스터플랜 수립용역 착수

□ 반      성

◦ 거점시설 부지 미확보로 사업추진이 지연되었으나 대체부지 마련과 도시재생 활성화계획을 현행화하여 적극적이고 신속하게 사업을 추진해 나가겠음

		도시재생 활성화계획 수립
		도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)
		도시재생 뉴딜사업 (푸른솔 세대통합 행복마을)
		도시재생 뉴딜사업 (독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)
		도시재생 뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중)
		동산동 월담지구 새뜰마을사업
		모현동 옥창지구 새뜰마을사업
		평화동 평화지구 새뜰마을사업

2021 주요업무계획

1		도시재생 활성화 계획 수립

□ 사 업 개 요

◦ 사업범위 : 금마고도 활성화지역, 함열 활성화지역

◦ 용역기간 : 2021. 1. ~ 2022. 1.(12개월)

◦ 용 역 비 : 350백만원(시비)

▸금마 활성화 계획 수립 : 100백만원

▸함열 전략계획 변경 및 활성화 계획 수립 : 250백만원

◦ 주요내용

▸2021년 도시재생 공모 대응 도시재생활성화계획 수립

▸현황 및 여건분석을 통한 지역주민 중심의 종합적인 실행계획 수립

□ 추 진 계 획

◦ 용역계약 및 착수	: 2021.  1.

◦ 도시재생 전략계획 변경(활성화지역 조정)	: 2021.  4.

◦ 도시재생 활성화계획(안) 수립	: 2021.  6.

▸대상지 현황조사 및 분석(도시현황, 지역자산, 기초생활인프라 등)

▸활성화계획 수립(비전 및 목표, 사업의 계획, 기반시설 설치․정비계획, 사업추진 거버넌스 운영, 재원조달계획, 성과관리 등)

◦ 국토부 뉴딜사업 공모 신청	: 2021.  7.

◦ 도시재생 활성화계획 승인 및 공고	: 2021. 10.

◦ 용역 준공	: 2021. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도시재생사업 추진을 위한 뉴딜 공모사업 선정

◦ 뉴딜사업 공모 적극 대응 및 국비확보를 통한 재생사업 촉진

2		도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 중앙동1가 24번지 일원(원도심 지역)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022(5개년)

◦ 사업면적 : 185,007㎡

◦ 사업내용 : 익산 사회․경제 어울림센터 조성, 익산 푸드 문화메카 조성, 중․매․서 커뮤니티라운지 조성, ‘삼산’기억명소화 프로젝트 익산역 프롬나드 조성, 세대공감 커뮤니티센터 조성, 익산 도시재생 거버넌스 구축

◦ 총사업비 : 25,000백만원(국비 15,000 도비 2,500 시비 7,500)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
총계	25,000	7,250	7,850	3,650	3,625	2,625
국비	15,000	4,350	4,710	2,190	2,175	1,575
도비	2,500	725	785	365	362	263
시비	7,500	2,175	2,355	1,095	1,088	787

□ 추 진 계 획

◦ 연차별 사업계획에 따른 단위사업 추진	: 2021. 1. ~

▸익산역 프롬나드(문화이리로, 문화주차장 등) 공사 추진 완료

▸어울림센터, 푸드메카 리모델링

▸특화거리 실시설계 완료 및 사업 시행

▸문화주차장 2공구 실시설계 시행

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민활동 지속 추진	: 2021. 1. ~

▸주민협의체 및 도시재생대학 운영, 중앙어게인 문화예술축제 등

□ 기 대 효 과

◦ 중앙동 일원 원도심지역의 문화적, 역사적, 지역적 자원을 활용한 종합적체계적 재생사업 시행으로 지역 활성화를 위한 마중물 역할 기대

3		도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 송학동 97-10번지 일원(KTX익산역 서편지역)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023(4개년)

◦ 사업면적 : 193,000㎡

◦ 사업내용 : 푸른솔커뮤니티센터, 커뮤니티가든 조성, 공동체 일자리플랫폼, 자원순환형 공동체텃밭, 도시재생리빙랩스테이션, 도시재생거버넌스 운영, 공공리모델링 임대주택(45호), 행복주택(80호) 공급 등

◦ 총사업비 : 16,700백만원(국비 10,000 도비 1,600 시비 5,100) / LH 17,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	16,700	3,500	4,466	4,466	4,268
국비	10,000	2,100	2,680	2,680	2,540
도비	1,600	350	446	446	358
시비	5,100	1,050	1,340	1,340	1,370

□ 추 진 계 획

◦ 부지 협의 매입 지속 추진	: 2021. 1. ~

▸커뮤니티가든, 도시재생리빙랩스테이션 등

◦ 주요 단위사업 설계 완료 및 사업 추진	: 2021. 1. ~

▸마을안길정비, 상업가로환경 정비, 공동체 텃밭 등

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민활동 지속 추진	: 2021. 1. ~

▸주민협의체 및 도시재생대학 운영, 공동체 먹거리 나눔, 꼬마농부체험 프로그램 시행 등

□ 기 대 효 과

◦ 원도심과 분리되어 발생한 도시성장의 소외와 불균형을 해결하기 위해 유휴공간을 활용한 생활SOC 확충, LH전북지역본부와 연계한 주거환경 개선 등 지역주민의 삶의 질 향상 및 지역 활성화

4		도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 인화동1가 119번지 일원(인화동 남부시장지역)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023(4개년)

◦ 사업면적 : 114,500㎡

◦ 사업내용 : 주민복지공간 및 근대역사의 숲 조성, 솜리문화공방 조성, 솜리상생상회 조성, 노후주거지 환경 개선, 공동체 회복을 위한 거버넌스 구축 등

◦ 총사업비 : 14,200백만원(국비 8,500 도비 1,400 시비 4,300)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	14,200	2,975	3,500	4,730	2,995
국비	8,500	1,785	2100	3,000	1,615
도비	1,400	297	350	500	253
시비	4,300	893	1050	1,230	1,127

□ 추 진 계 획

◦ 부지 협의 매입 지속 추진	: 2021. 1. ~

▸근대역사의 숲 · 솜리문화공방 조성 등

◦ 주요 단위사업 설계 완료 및 사업 추진	: 2021. 1. ~

▸4.4만세운동 기념길 조성 및 광정 정비, 상생협력상가 및 상생마당 조성

▸구시장길·한복거리 가로디자인, 폭4m미만 도로 유니버셜 디자인

◦ 건축자산 진흥구역 및 관리계획 수립 용역 추진	: 2021. 1. ~

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민활동 지속 추진	: 2021. 1. ~

▸솜리 도시재생대학 및 주민협의체 운영, 주민공모전, 근대역사 관련 도시간 교류 프로그램 등 시행

□ 기 대 효 과

◦ 역사적 의미가 있는 빈공간에 주민 생활밀착형 어울림 공간과 창업·문화 공간을 조성하여 지역 활성화 구심점 기능 부여 및 주변 지역 활력 도모

5		도시재생 뉴딜사업(도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 남중동 60번지 일원(남중동 신청사지역)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023(4개년)

◦ 사업면적 : 160,490㎡

◦ 사업내용 : 생활속 어울림플랫폼 조성, 신청사~국민생활관간 가로경관 정비, 상생협력상가 및 상생마당조성, 지역특화 창업 및 공동체 활성화, 청사주변 상생방안 마련, 행복주택공급 및 문화복지시설 조성, 노후주거지 정비, 거버넌스 구축 및 공동체 활성화 등

◦ 총사업비 : 16,700백만원(국비 10,000 도비 1,666 시비 5,034)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	16,700	1,000	2,417	6,642	6,641
국비	10,000	600	1,450	3,975	3,975
도비	1,666	100	242	662	662
시비	5,034	300	725	2,005	2,004

※ 2020년 시비 부담금 288백만원 미확보(2021년 추경시 반영)

□ 추 진 계 획

◦ 주요 거점시설 조성사업 추진	: 2021. 1. ~

▸상생협력상가 및 마당 토지보상 및 설계

▸생활속어울림 플랫폼 건립 위탁(LH전북본부)

◦ 주거 및 가로환경 정비 지원사업 추진	: 2021. 1. ~

▸가로경관 및 골목길 정비사업

▸노후주거지 정비 지원사업

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민활동 지원 및 추진	: 2021. 1. ~

▸주민협의체 및 도시재생대학 운영

▸현장지원센터 개소(현 여성회관 2층)

□ 기 대 효 과

◦ 신청사 리뉴얼사업과 연계하여 생활SOC 확충 및 행복주택 공급, 청사 주변 상생공간 조성 및 정주환경 개선으로 지역 활성화 도모

6		동산동 월담지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 동산동 356번지 일원

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2021(6개년)

◦ 사업면적 : 43,300㎡

◦ 사업내용 : 주택정비 지원, 안전확보, 생활·위생인프라, 마을공동체 지원사업,
주민역량강화사업등

◦ 총사업비 : 3,850백만원(국비 2,694 도비 346 시비 810)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액 (2016~2020)	2021년 예산 (이월비)	비고
총계	3,850	2,932	918
국비	2,694	2,199	495
도비	346	217	129
시비	810	516	294

□ 추 진 계 획

◦ 연차별 집행계획에 따른 사업 추진	: 2021. 1. ~ 12.

▸마을안길정비(소방도로 개설) 및 도시가스 공급

▸주민공동이용시설 신축 및 주민역량강화 사업 추진

□ 기 대 효 과

◦ 취약지역 주민의 안전·위생등 생활 인프라 확충, 주거환경 개선, 주민  역량강화 등을 지원하여 주민의 삶의 질 향상

7		모현동 옥창지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 모현동1가 67-73번지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022(4개년)

◦ 사업면적 : 24,640㎡

◦ 사업내용 : 안전확보, 생활·위생인프라 구축, 주택정비 지원, 마을공동체
지원사업, 도시가스 공급, 주민공동이용시설 설치 등

◦ 총사업비 : 4,200백만원(국비 2,940 도비 378 시비 882)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
총계	4,200	1,177	1,007	1,176	840
국비	2,940	824	705	823	588
도비	378	106	91	106	75
시비	882	247	211	247	177

□ 추 진 계 획

◦ 연차별 사업계획에 따른 단위사업 추진	: 2021. 1. ~ 12.

▸사면보강공사(절개지 정비) 및 소방도로 개설 공사

▸도시가스 공급, 주차장 조성 등

▸주민공동이용시설 설치, 주택정비지원(집수리, 공·폐가 정비 등)

◦ 부지 협의 매입 추진(주민공동이용시설 등)	: 2021. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 취약지역 생활여건 개조사업을 통하여 가로환경정비, 공동체 활성화 시설 조성 등 안전한 주거환경 확보 및 주민의 기본적인 삶의 질 향상

8		평화동 평화지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 33-19번지 일원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023(4개년)

◦ 사업면적 : 77,100㎡

◦ 사업내용 : 안전확보, 주택정비, 인프라정비, 복지 및 휴먼케어 등

◦ 총사업비 : 4,134백만원(국비 2,894 도비 372 시비 868)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	4,134	829	675	1,315	1,315
국비	2,894	580	472	921	921
도비	372	75	61	118	118
시비	868	174	142	276	276

□ 추 진 계 획

◦ 마스터플랜수립용역 주민 협의 및 추진	: 2021. 1. ~  8.

◦ 완충녹지, 커뮤니티거점정비(우선사업) 보상 및 사업 추진	: 2021. 1. ~ 12.

◦ 연차별사업계획에 따른 사업 추진	: 2021. 8. ~ 12.

▸소방도로 개설, 경로당신축, 도시가스 공급, 노후주택 정비 등

□ 기 대 효 과

◦ 취약지역 생활여건 개조사업을 통하여 공·폐가 정리, 완충 녹지상의 작물 재배 방지, 건축자재 적재 해소 등 안전한 주거환경 확보 및 주민의 삶의 질 향상