2021. 1.

제233회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 계획

	건설국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 주요성과 및 반성
□	2021 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	20		1	4	9	4	2
현 원	21		1	7	10	3	0
증 감	1		-	3	1	△1	△2

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	건설과 소관 용지매입, 토지수용 재결, 소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등, 사업관련 협의, 시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업 추진
	◦	하천시설	:	하천기본계획수립, 지방하천환경정비사업, 소하천정비사업
	◦	하천관리	:	지방하천 및 소하천유지관리,국가하천 금강 용안생태습지유지관리, 국가하천 만경강 친수시설 유지관리, 하천사용료 징수 부과, 골재채취허가
	◦	가로등관리	:	가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하 천 현 황

구 분	개 소	하천현황(km)			개수율 (%)	기본계획수립
		계	개 수	미개수		개소	연장(km)
계	92	323.63	154.78	168.85	47	85	305.67
국가하천	3	34.20	34.20	-	100	3	34.20
지방하천	27	187.23	92.41	94.82	49	20	169.27
소 하 천	62	102.20	28.17	74.03	27	62	102.20

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
480	408	55	17	243,375	225,941	11,263	6,171

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
30,082등	19,509등	10,573등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2020 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 농어촌도로 확·포장을 통한 농수산물의 생산·유통 향상과 생활환경개선등 주민편익 증진

▸공사완료 5개노선

- 함라칠성~다은간도로 L=1.0㎞, 망성신성~관산간도로 L=1.1㎞
용안창리~법성간도로 L=0.8㎞, 망성군도10호~금지간도로 L=1.2㎞
오산제일교회~정각사간도로 L=0.4㎞

▸공사중 3개노선

- 춘포토다리~덕동간도로 L=1.0㎞, 황등도선~외화간도로 L=0.4㎞
금마갈산~서편간도로 L=1.6㎞

◦ 교통사고 위험도로 선형개량 및 회전교차로설치 등 구조개선

▸회전교차로 2개소 설치 완료

- 용안 난포삼거리, 지방도 723호 백제로 신왕교차로

▸실시설계용역 2개노선 완료

- 왕궁신호~용남간 위험도로 구조개선

- 낭산~시명간 위험도로 선형개량

◦ 금강 용안생태습지 2020.10월 한국관광공사 코로나19 비대면 대한민국 관광지 100선 선정

◦ 도로조명 조도개선

▸노후가로등정비 394개소, 보안등 교체 및 설치 337개소

▸가로등, 보안등 생활민원처리 7,124건

□ 반      성

◦ 이례적으로 긴 장마기간과 집중호우로 왕궁천 하천정비공사 공정이 지연되었으나 만회대책으로 계획공정을 일부 조정하고 장비와 인력을 동시에 투입하여 조속한 사업을 추진하겠음.

◦ 시군도 농어촌도로 편입 토지매입 협의가 지연되어 예산집행률이 다소 저조함. 앞으로 토지수용 재결 절차를 병행하여 조속한 시일내에 사업이 추진될 수 있도록 노력하겠음.

2021 주요업무계획

		시·군도 및 농어촌도로 확포장
		군도23호선 도로확·포장
		호남고속철도 시설개량 및 평화육교 재가설
		국도27호 서수~평장간 대체우회도로 개설
		익산토성 백제왕도 탐방로 조성
		지방하천 왕궁천 정비사업
		지방하천 동면천 정비사업
		동산 소하천 정비사업
		진사 소하천 정비사업
		만경강 문화관 조성사업
		금강 용안생태습지 유지관리
		만경강 친수시설 유지관리
		하천제방 유지관리
		도로조명 조도개선

1		시·군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 13개 읍면동

◦ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 30개노선 L=28.43km, B=5.0-24.0m

◦ 총사업비 : 57,197백만원

총사업비	기 투자	2021년	2022년이후	비 고
57,197	24,311	4,315	28,571

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 중 10개노선	: 2021. 1. ~ 12.

▸군도 3개노선, 농어촌도로 7개노선

◦ 행정절차이행 및 토지보상 중 10개노선	: 2021. 1. ~ 12.

▸시도 2개노선, 군도 1개노선, 농어촌도로 7개노선

◦ 공사중 7개노선	: 2021.1.~2022.12.

▸시도 1개노선, 군도 1개노선, 농어촌도로 5개노선

◦ 기본계획 및 타당성조사 용역 중 3개노선	: 2021. 1. ~ 12.

▸시군도 농어촌도로 기본계획 수립용역, 타당성조사 2개노선

□ 기 대 효 과

◦ 농어촌지역 주민의 교통편익과 농수산물의 생산·유통성을 향상시켜 지역경제 활성화 기여

2021년도 노선별 추진 계획

□ 도 로 현 황

구 분	계	시 도	군 도	농어촌도로
노 선 수	1,539	1,264	23	252
연 장	1,185	461	201	523
확 포 장	681	369	115	197
포장률(%)	57.5	80.0	57.2	37.7

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2022년

◦ 사업개요 : 도로확포장 30개노선 L=28.43km, B=5.0-24.0m

◦ 총사업비 : 57,197백만원 (2021년  4,315)

◦ 노선별 추진상황

구 분	등 급	노 선 명	단 위 사 업 명	연장및폭원	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	21예산액	금 후
계		30개노선		L=28.43km B=5.0-24m	57,197	24,311	4,315	28,571
시설 공사 (7개)	시 도 (1개)	68호	석왕동신왕교차로 회전교차로설치	회전교차로 1식	280	280	-	-	90%
	군 도 (1개)	23호	군도23호 도로확포장	L=3.40km B=20.5m	12,500	11,500	1,000	-	85%
	농어촌 도 로 (5개)	춘포103호 (신화선)	춘포토다리-덕동간 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,920	750	-	1,170	25%
		금마102호 (누부선)	금마누동-신촌간 도로확포장	L=0.93km B=8.0m	980	580	-	400	65%
		황등104호 (황팔선)	황등도선-외화간 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	1,000	400	-	600	15%
		왕궁207호 (양곡선)	왕궁양동마을 진입도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,310	780	200	330	70%
		금마101호 (서삼선)	금마갈산-서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,829	779	100	1,950	5%
토 지 보 상 (10개)	시 도 (2개)	1201호	삼성하나로-외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730	-	2,450	63%
		1268호	어양어곳-부평간 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	3,100	1,250	900	950	56%
	군 도 (1개)	21호	왕궁온수-시대간 (황암-상발)확포장	L=3.00km B=8.0m	2,803	616	-	2,187	10%
	농어촌 도 로 (7개)	왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동-군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300	-	700
		함라301호 (행진선)	함라 행진선 도로확포장	L=1.43km B=6.5m	2,063	900	100	1,063	85%
		왕궁303호 (사곡선)	왕궁가좌마을 진입로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,116	103	-	1,013	63%
		왕궁302호 (신평선)	왕궁평화촌-평리간 도로확포장	L=1.30km B=8.0m	3,445	180	-	3,265	52%
		오산203호 (신수선)	오산역–상아마을간 도로확포장	L=0.20km B=8.0m	200	200	-	-	15%
		금마202호 (서오선)	금마신정-중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	1,500	600	-	900	보상 통지
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.50km B=8.0m	1,000	130	-	870	보상 통지
실 시 설 계 (10개)	군 도 (3개)	2호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.95km B=24.0m	5,000	1,100	-	3,900
		9호	낭산-시영간 선형개량사업	L=0.40km B=8.0m	1,000	100	400	500	국비 50%
		19호	왕궁신호-용남 위험도로구조개선사업	L=0.50km B=8.0m	486	486	-	-	국비 50%
	농어촌 도 로 (5개)	춘포308호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	100	-	1,400
		왕궁210호 (신기선)	왕궁군도26호선 도로확포장	L=1.70km B=8.0m	2,970	797	-	2,173
		춘포311호 (노적선)	춘포 노적선 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	700	100	50	550
		삼기203호 (석라선)	하나로-소간촌간 도로확포장	L=1.58km B=8.0m	1,400	600	-	800
		오산301호 (용연선)	오산 용연선 도로확포장	L=0.6km B=8.0m	900	-	100	800
	농어촌도로 지정예정 (1개)		황등하동마을- 동연지하차도간 도로확포장사업	L=0.70km B=8.0m	1,250	650	-	600
	농어촌도로 겸용 탐방로 (1개)		백제왕도탐방로 (익산토성)조성공사	L=1.74km B=5.0m	1,355	70	1,285	-
기본계획 및 타당성용역 (3개)			시,군도 도로관리계획 및농어촌도로기본 정비계획수립용역	1식	320	160	160	-
			서부내륙고속도로 삼기하이패스I.C 타당성조사용역	1식	70	70	-	-
			지방도723호선 노선지정 타당성조사용역 (춘팔선농어촌도로)	1식	20	-	20	-

2		군도23호선 도로확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열읍 용왕교차로 ~ 삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 6.

◦ 사업규모 : L=3.40km, B=20.5m (2차로 → 4차로확장)

◦ 총사업비 : 12,500백만원(공사비 9,000 보상비 3,100 기타 400)

총사업비	기 투자	2021년	2022년 이후	비고
12,500	11,500	1,000	-

□ 추 진 계 획

◦ 잔여토지 손실보상 및 수용재결	: 2020. 1.~2021. 3.

(대상토지 18필지 3,123㎡)

◦ 잔여분 공사추진	: 2020. 3.~2021. 4.

▸전체 공정율 85% (`20년 12월말기준)

◦ 공사준공	: 2021. 6.

□ 기 대 효 과

◦ 삼기일반산업단지 조성에 따른 함열~삼기일반산업단지간 교통량증가에 대비하고 원활한 교통망을 구축하여 물류 수송비용 절감 및 지역 균형발전 촉진

3		호남고속철도 시설개량 및 평화육교 재가설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2021. 9.

◦ 사업규모

▸KTX호남고속철도 시설개량 L=864m (2선로 → 4선로 확장)

▸평화육교 재가설 L=365.5m (4차로 → 6차로)

▸접속도로 철거 및 신설 L=770m

▸대체우회도로 (4차로) L=1,068m

◦ 총사업비 : 53,051백만원

구 분	총 사업비	기 투자	2021년도	2022이후
계	53,051	47,805	5,246	-
국가철도공단	30,700	30,700	-	-
익 산 시	22,351	17,105	5,246	-

◦ 시 행 자 : 국가철도공단

◦ 토지보상 : 익   산   시

□ 추 진 계 획

◦ 평화육교 접속램프 및 교량 재가설	: 2021.1.~2021.5.

(전체공정율 76%, 2020. 12월기준)

◦ 평화육교 개통	: 2021. 6.

◦ 대체우회도로 철거 및 원상복구	: 2021. 7. ~ 8.

◦ 공사완료	: 2021. 9.

□ 기 대 효 과

◦ 안전등급 D등급인 평화육교를 재가설하여 KTX호남고속철도 통과시  진동으로 인한 안정성확보 및 위험요소 해소로 시민들의 안전성 확보

4		국도27호 서수~평장간 대체우회도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2028. 5.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km , B= 21.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 317,500백만원

※ 동지역(월성,은기,덕기동) 토지보상금 10,000백만원 시비 분담

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청

□ 추 진 계 획

◦ 장기계속공사 총괄발주 (익산지방국토관리청)	: 2021. 1.

◦ 편입토지 및 지장물조사	: 2021. 2. ~ 5.

◦ 공 사 착 공	: 2021. 5.

◦ 편입토지 보상계획열람 공고	: 2021. 5. ~ 6.

◦ 편입토지 감정평가 및 손실보상	: 2021. 7. ~

◦ 공 사 준 공	: 2028. 5.

□ 기 대 효 과

◦ 국도27호 대체우회도로 개설로 도심지 교통정체 및 혼잡구간 해소

◦ 호남고속도로와 서해안고속도로 연결로 지역균형발전 및 간선도로망 확충

5		익산토성 백제왕도 탐방로 조성

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 서고도리 쌍능길 (삼정원 ↔ 미륵사지로까지)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12..

◦ 사업규모 : 도로확포장 L=1.74㎞, B=5.0m

◦ 총사업비 : 1,355백만원(공사비 985, 보상비 300, 기타 70)

총 사업비	기 투 자	2021년도	2022년이후	비 고
1,355	70	1,285	-

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계용역 완료	: 2021.  1.

※문화재청 현상변경허가 완료 (2020.7.6.)

(허가조건) 노폭 5.0m

연장 1.74㎞ 중 문화제보호구역 1.16㎞ 황토콘포장

◦ 편입토지 감정평가 및 손실보상	: 2021.  2. ~ 4.

◦ 공사착공	: 2021.  5.

◦ 공사완료	: 2021. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 세계문화유산인 백제왕궁과 미륵사지를 찾는 관광객의 편의성과 접근성을 향상시켜 익산토성과 연계한 관광자원 기반 구축

◦ 농어촌지역 주민들의 교통편익과 농수산물의 생산·유통성을 향상시켜지역경제 활성화 기여

6		지방하천 왕궁천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 보석박물관 ~ 춘포면 익산천합류점

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=17.9㎞, 노후교량 재가설 9개소 등

◦ 총사업비 : 47,368백만원 (국비 10,093, 도비 23,065, 시비 14,210)

공구별	총 사업비	기 투 자	2021년도	2022년이후
계	47,368	28,696	3,000	15,672
1지구	23,693	21,693	2,000	0
2지구	23,675	7,003	1,000	15,672

▸2021년 예산액 : 3,000백만원 (도비 2,100 시비 900)

□ 추 진 계 획

≪1지구≫ 익산천합류점 ~ 흥암교까지 L=8.70㎞,

◦ 제방축제 및 보축, 노후교량 재가설 5개소 등	: 2021. 3. ~ 11.

(전체공정율 40%, 2020. 12월기준)

◦ 공사완료	: 2021. 12.

≪2지구≫ 흥암교 ~ 보석박물관 L=9.20㎞,

◦ 제방축제 및 보축 , 노후교량 재가설 4개소 등	: 2021. 3.~2022.11.

(전체공정율 10%, 2020. 12월기준)

◦ 공사완료	: 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

7		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 동촌리 ~ 평장리 부상천합류점

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=6.10㎞, 노후교량 재가설 7개소 등

◦ 총사업비 : 15,489백만원 (국비 1,000, 도비 9,842, 시비 4,647)

총 사업비	기 투 자	2021년도	2022년이후	비 고
15,489	2,440	1,000	12,049

▸2021년 예산액 : 1,000백만원 (도비 700 시비 300)

□ 추 진 계 획

◦ 전라북도 실시설계 2차 실무협의	: 2021. 1.

▸편입토지 협의보상 및 설계적정성 검토(조달청) 병행

◦ 전라북도 건설기술심의	: 2021. 2.

◦ 전라북도 총사업비 협의	: 2021. 4.

◦ 각종 인허가 및 장기계속공사 총괄발주(공사,감리)	: 2021. 6.

◦ 건설사업관리용역 및 공사착공	: 2021. 7.

◦ 제방축제 및 보축 L=6.10㎞, 노후교량 재가설 7개소 등	: 2021. 7.~2023.11.

◦ 공사완료	: 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 개발과 연계한 하천환경개선으로 시민들의 생명과 재산을 보호하고 안정된 생활 여건 제공

◦ 집중호우 등 자연재해 발생시 주변 농경지, 주택 침수피해 사전 예방

8		동산소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 웅포면 맹산리 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 6.

◦ 사업규모 : 소하천정비 L=1.02㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=1.02㎞, 노후교량 재가설 6개소 등

◦ 총사업비 : 3,210백만원 (국비 353, 시비 2,857)

▸2021년 예산액 : 907백만원 (시비)

□ 추 진 계 획

◦ 제방축제 및 보축 등 잔여공정 마무리	: 2021. 1. ~ 5.

(전체공정율 85%, 2020. 12월기준)

◦ 공사완료	: 2021. 6.

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우, 홍수 등 자연재해 발생시 주변 농경지, 주택 침수피해를 방지하고 효율적인 하천 이ㆍ치수로 시민들에게 안정된 생활 여건 제공

9		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 소하천정비 L=1.37㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=1.37㎞, 노후교량 재가설 5개소 등

◦ 총사업비 : 1,500백만원

▸2021년 예산액 : 200백만원 (시비)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계용역 발주 및 착수	: 2021.  1. ~ 2.

◦ 주민설명회	: 2021.  4.

◦ 익산시공공디자인 심의	: 2021.  6.

◦ 전라북도 실시설계(안) 사전검토	: 2021.  9.

◦ 전라북도 공사원가심사	: 2021. 11.

◦ 실시설계용역 완료	: 2021. 12.

◦ 편입토지 감정평가 및 손실보상	: 2022.  1. ~ 12.

◦ 공사착공	: 2022.  6.

◦ 공사완료	: 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우, 홍수 등 자연재해 발생시 주변 농경지, 주택 침수피해를 방지하고 효율적인 하천 이ㆍ치수로 시민들에게 안정된 생활 여건 제공

10		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지 (신탁지구 포함)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 11,350백만원 (국비 10,000 시비 1,350)

◦ 규    모 : 13,814㎡ (지하1층, 지상2층, 연면적 1,686㎡)

◦ 주요시설 : 생태전시 및 홍보관, 다목적실, 사무실, 카페테리아 등

◦ 시 행 자 : 국토교통부 익산지방국토관리청

◦ 편입토지 손실보상 :  익 산 시

□ 추 진 계 획

◦ 건축 및 토목공사 등 추진	: 2021.  1. ~  6.

(전체공정율 75%, 2020. 12월 기준)

◦ 전시물 설계·제작 등 콘텐츠 설치용역 추진	: 2021.  1. ~ 12.

◦ 시설물 인계 인수	: 2021. 12.

(익산지방국토관리청 → 익산시)

◦ 익산시 만경강 문화관 관리 · 운영	: 2022.  1. ~

□ 기 대 효 과

◦ 만경강과 관련된 역사와 생활상을 전시·소개하여 이용객들에게
편의제공 및 체험활동 참여 확대

◦ 만경강 수변도시 인구 유입 주거공간 및 양질의 정주환경 조성 기여

11		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 전망데크 제방연결로포장, 주차장 등 편의시설 정비,
노후시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 총사업비 : 845백만원 (국비 400 시비 445)

(단위 : 백만원)

재원별	세 부 사 업 내 용	2021예산액
	계	845
국 비	홍련지 데크및 연못 수련 보수, 창포 초화류	271
	하천 환경정비 기간제(감시원), 공공운영비	129
시 비	제방 연결도로, 광장 주차진입로, 안내표지판 등	250
	산책로 데크 및 황토포장 보수, 제초・예초	195

□ 추 진 계 획

◦ 보강시설물 실시설계용역	: 2021. 1. ~ 3.

◦ 대전지방국토관리청 하천점용허가 협의	: 2021. 2.

◦ 관광활성화를 위한 조경시설 보강	: 2021. 4. ~ 7.

◦ 생태습지 유지관리	: 연 중

□ 기 대 효 과

◦ 코로나19 비대면 관광지 100선에 선정됨에 따른 기반시설 및 편의시설 기능을 보강하여 용안생태습지 관광활성화 기여

12		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강 L=28km (오산면 ↔ 춘포면)

◦ 주요시설 : 6개지구 (익산지방국토관리청시행)

구 분	완 료	완료예정	주 요 시 설	비 고
신지지구	2016		자전거도로 5.42km, 친수공간 등	운영중
목천지구	2016		자전거도로 2.32km, 파크골프장 등
춘포지구	2016		자전거도로 4.0km, 축구장, 수변공원 등
화전지구	2018		자전거도로 1.3km, 구담교, 친수공간 등
반월지구		2021	자전거도로 2.8km, 축구, 야구, 족구, 농구, 인라인장 등	공사중
마산지구		2021	자전거도로 5.87km, 친수공간 등

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 338백만원 (국비 258, 시비 80)

▸기간제근로자 인건비	:  20백만원

▸화장실 등 환경정비	:  10백만원

▸시설물 보수·보강, 자전거도로 제초, 예초작업 등	: 228백만원

▸목천지구 파크골프장 보수.보강	:  80백만원

◦ 주요내용 : 친수시설관리, 자전거도로 제초, 예초, 시설물보수 등

□ 추 진 계 획

◦ 친수시설 유지관리	: 연  중

□ 기 대 효 과

◦ 친수시설 유지보수를 통하여 안전하고 쾌적한 하천환경 조성 기여

13		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소 187.2km, 소하천 62개소 102.2km

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 집중호우대비 시설물보수, 하상준설, 지장물제거,

제방 및 호안 제초, 예초 등

◦ 총사업비 : 1,419백만원(도비 80, 시비 1,339)

(단위 : 백만원)

구 분	단 위 사 업 별	2021예산액	주 요 내 용
수해복구	왕궁 쌍제천 하천준설	50	퇴적토준설
	금마 황동천 제방보수	32	제방보수
	삼기 기양천 석축보수	50	호안 석축보수
	팔봉 갈전천 석축보수	70	호안 석축보수
	낭산 죽림천 죽림1교 보수	120	소교량 재가설
	탑천 하상준설	300	퇴적토준설
	죽청천, 부상천 등 유지보수	160	퇴적토준설, 잡목제거 등
지방·소하천 유지관리		500	20년 응급복구 및 21년 호우피해 대비 등
산북천 제방도로 포장		131	제방포장
탑천 제초작업		6	재방도로 제초

□ 추 진 계 획

◦ 지방하천 및 소하천 유지관리	: 연  중

▸`20년 집중호우 피해하천 수해복구 → 영농기 이전 완료

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우 등 자연재해시 하천으로 인한 피해를 사전에 예방하고 이를 통하여 안전한 하천시설 및 쾌적한 하천환경 조성 기여

14		도로조명 조도 개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 생활환경개선 보안등 설치 외 11개사업

◦ 총사업비 : 1,116백만원

(단위 : 백만원)

구 분	단위사업명	주 요 내 용	2021예산액
	계	13개 사업	1,116
가로등	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비120개소	120
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 60개소	60
	가로등 노후점멸기 교체	노후점멸기교체 5개소	22
	전기안전점검 부적합지 보수	점검부적합보수 300개소	30
	도심지역 노후가로등 교체	노후가로등정비 1식	100
	노후가로등 LED 교체	LED등기구교체 1식	100
	산업단지 조도개선	램프(안정기)교체 1식	80
	별빛달빛 프로젝트 사업	가로등보안등 정비 1식	57
보안등	생활환경개선 보안등 신규설치	보안등설치 283개소	305
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	120
	동지역 보안등 보수	동지역 고장보안등 수리	80
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	42

□ 추 진 계 획

◦ 가로등․보안등 실시설계 및 단가계약	: 2021.  1.

◦ 가로등․보안등 공사추진	: 2021.  1. ~ 12.

◦ 보안등 신규설치 현장조사 및 사업추진	: 2021.  2. ~  6.

◦ 사업완료	: 2021. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도로조명 시설의 신규설치 및 정비를 통해 안전사고를 예방하고 야간통행 환경을 개선함으로써 안전한 밤거리 조성 기여