2021. 1.

제233회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 계획

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 주 요 성 과
□	2021 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 안심하고 마실수 있는 ‘多e로움 water’공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	안전하고 깨끗한 물, 365일 안정적인 생산․공급 방안강구 유수율 향상을 통한 공기업 재정 건전성 제고 자체 수돗물 목표 수질기준 강화 설정운영

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	상수도 현대화 사업을 통한 상수도 공급관망 개선 정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 스마트 미터 사업을 통한 유수율 제고 및 행정의 신뢰성 확보

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정  ․  현  원

(2021.1.4.기준)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	7	15	11	5	2
현 원	43	1	1	10	19	4	6	2
증 감	1			3	4	△7	1

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 마을상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사, 급수민원처리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 5, 여 5

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	282,582	280,886	99.4
도심권	223,956	223,709	99.9
읍면권	58,626	57,177	97.5

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	146,120
생 활 용 수	소 계	195,300	125,992	100%
	광 역	105,300	64,787	51%
	자 체	90,000	61,205	49%
공 업 용 수	자 체	35,000	20,128

□ 상수도 사용 현황

‘20. 12. 부과분 기준(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	64,097	3,274,127	100.0
가 정 용	48,744	1,670,344	51.0
일 반 용	14,526	557,725	17.0
대중탕용	40	16,581	0.5
산 업 용	689	377,896	11.5
전용공업용	98	651,581	20.0

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,888.8	2.5	25.3	1,581.9	279.1

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2020 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

‣ 위탁협약 체결(익산시+한국수자원공사) : 2020. 1. 17.

‣ 노후상수도 정비사업 : 기본 및 실시설계용역 착수 (2020. 9.)

‣ 스마트 지방상수도 지원사업 : 기본계획 확정(안) (2020. 9.)

‣ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 : 기본계획용역 착수 (2020. 2.)

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

‣ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 10개소 4.6km/705개소

‣ 관내 변류정비 및 교체 200개소

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

‣ 상수도 요금 부과/징수 : 23,907백만원/23,641백만원(징수율 98.9%)

‣ 노후·고장 수도계량기 교체 : 3,384전

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수구역 확장공사 : 4개소, 2.795km/급 □ 배수관 개선공사 : 210개소 7.5km

◦ 수도요금 감면 확대 실시로 코로나 19로 인한 시민부담 해소

‣ 코로나19로 인한 수도요금 감면확대 실시

- 기초생활수급자 및 다자녀 등 : 56,105건, 124,643천원

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 급수장치 수선 공사 : 1,659건/수용가 옥내 누수탐사 891건

‣ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 37개소 11.3km

□ 반      성

◦ 상수도 요금 현실화율 감소

‣ 코로나 19 확산으로 상수도 요금 현실화 추진 유보

‣ 연도별 현실화율 현황(2017년 76.29%, 2018년 75.05%, 2019년 72.40%)

		지방상수도현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축> 스마트미터 사업 추진 금마배수지 확충 공사 급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사 상수도 요금․부과 징수 정수시설물 운영 최적화 정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

2021 주요업무계획

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 사 업 비 : 58,725백만원

▸노후상수도 정비사업 : 55,733백만원(국 50%, 도 10%, 시 40%)

- 2021년 사업비 : 12,080백만원(국 6,040  도 1,208  시 4,832)

▸스마트 관망관리 인프라 구축 : 2,992백만원(국 70%, 시 30%)

◦ 사업내용

▸노후관교체(L=148km) 및 블록시스템구축(31개소)

▸정밀여과장치, 자동수질 측정장치, 유량수압 감시 시스템 등

□ 추 진 계 획

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역	: 2020. 1. ~ 2022. 8.

▸블록시스템 구축공사 추진	: 2021. 1. ~ 12.

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸1단계(스마트관로인식체계, 워터코디․닥터)	: 2021. 1. ~  6.

▸2단계(정밀여과장치, 자동수질 측정장치)	: 2021. 1. ~  7.

▸3단계(재염소설비,정밀여과장치,관세척 등)	: 2021. 3. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 노후 상수관망 현대화 시설 구축으로 유수율 제고 및 시민에게 맑은 물 공급

◦ 실시간 수질·수량 사고 사전감시 및 수질 이상시 오염수 자동배출 등 신속 대응

2		스마트미터 사업 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 12,100백만원(국 70%, 시 30%)

▸2021년 사업비 : 8,027백만원(국 5,619  시 2,408)

▸2020년 사업비 : 4,073백만원(국 2,851  시 1,222)

◦ 사 업 량 : 38,600전(총 64,097전의 60.2%)

◦ 사업내용

▸디지털 수도미터구입 및 설치공사, 원격검침단말기 설치, 통신망․ 관리 서버 및 소프트웨어 구축 등

□ 추 진 계 획

◦ 스마트미터 추진에 따른 기초자료 조사	: 2021. 1. ~ 3.

▸ 계량기 및 원격검침시스템 자료 조사, 설치 장소 협의 등

◦ 스마트미터 사업 설치공사 발주	: 2021. 4.

◦ 스마트미터 사업 설치공사	: 2021. 5. ~ 9.

◦ 스마트미터 사업 시범운영	: 2021. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 실시간 수도사용 검침으로 행정의 신뢰성 확보

◦ 사용량 분석을 통한 노인 고독사 예방 등 복지서비스 연계

◦ 신속한 누수‧고장 확인 및 대처로 유수율 제고

3		금마배수지 확충 공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 서고도리 산33-6번지 금마배수지 일원

◦ 사업기간 : 2021.01 ~ 2023.12(3개년)

◦ 사 업 비 : 8,010백만원(균특 5,900백만원, 시비 2,110백만원)

▸ 2021년 사업비 : 714백만원(도비 500, 시비 214백만원)

◦ 사업내용 : 배수지 확충(V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

▸ 2021년 사업내용 : 실시계획승인, 배수지 토공 및 기초공사

□ 추 진 계 획

◦ 금마배수지 확충공사 단가조정 설계 발주	: 2021. 1. ~ 3.

◦ 금마배수지 확충공사 원가심의, 설계심사	: 2021.  4. 20.

◦ 금마배수지 확충공사 실시계획인가(전북도)	: 2021.  5. 30.

◦ 금마배수지 확충공사 공사 발주	: 2021.  6. 30.

◦ 금마배수지 확충공사 공사 준공	: 2023. 11. 30.

□ 기 대 효 과

◦ 금마배수지 유효용량 확보로 안정적인 체류시간 확보(5.6hr → 12.3hr)

◦ 낭산 급수분구인 낭산면, 황등면, 금마면, 여산면 일원에 비상시에도 안정적인 생활용수 공급으로 시민불편 해소

4		급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1 ∼ 2021. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			1,608
급수구역 확장공사	송학교차로 일원	배수관부설 L=700m	147
	오산면사무소 앞	배수관부설 L=730m	153
	여산면 신부마을	배수관부설 L=590m	124
	읍□면□동 급수관로 신설	5개소	34
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	28개소, 7.0km	500
급·배수관 개선공사	익산시 일원	6.0km	650

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장공사	: 2021. 1. ~ 9.

▸현지조사 및 설계(1~2월) / 공사발주(3월) / 공사추진 및 준공(4~9월)

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사	: 2021. 1. ~ 6.

▸현지조사 및 설계(1~2월) / 공사발주(3월) / 공사추진 및 준공(4~6월)

◦ 급․배수관 개선공사	: 2021. 1. ~ 11.

▸상수도 공급 관련 생활민원처리 및 급․배수관 확장개선(연중 수시)

□ 기 대 효 과

◦ 급 □ 배수관 신설 및 확장으로 수돗물 공급 최적화

◦ 상수도 부설 후 노면불량 도로의 개선으로 안전사고 예방

5		상수도 요금 부과 ․ 징수

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

◦ 소요예산 : 755백만원(조사원 관리 638, 전산실 운영 117)

◦ 2021년도 부과․징수액 : 28,830백만원            (단위:백만원, ‘21.1.1.기준)

합계(A+B)	현년도 부과예정액(A)	과년도 체납액(B)	비고
28,830	27,932	898	2020년 체납액 : 354 2020년이전 체납액 : 544

※ 급수전수 : 64,097전(가정용 48,744전, 일반용 14,526전, 대중탕용 40전, 산업용 689전, 전용공업용 98전)

□ 추 진 계 획

◦ 정확한 사용량 조사를 위한 수도 계량기 조사원 관리

▸ 조사원 : 44명(통․리장 13명, 일반 31명)

▸ 친절․직무교육과 워크숍 : 교육(월 1회) / 워크숍(연 1회)

▸ 계량기 조사원 담당구역 상수도 요금 징수 책임제 시행

◦ 상수도 체납사용료 고액상습 체납자 징수반 편성․운영 : 2개반

▸ 30만원 이상, 3회이상 체납자에 대한 강력한 체납징수 : 수시

- 전화․방문 납부독려와 단수, 부동산에 대한 재산 압류

※ 기초생활수급자 등 사회적 약자와 혹한기 단수유예로 시민불편 최소화

◦ 상수도 요금체계 개선 및 현실화 추진

▸ 조례개정 추진 및 대시민 홍보 : 2021. 1. ~ 6.

▸ 상수도 요금인상 시행         : 2021. 7. ~

□ 기 대 효 과

◦ 정확한 사용량 조사 및 요금부과로 신뢰받는 상수행정 구현

◦ 강력한 징수활동을 통한 체납액 징수율 향상으로 재정건전성 도모

6		정수시설물 운영 최적화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

◦ 사업대상 : 11개소(정수장 2, 배수지 7, 가압장 2)

◦ 사 업 비 : 10개 사업 / 587백만원

◦ 사업내용

▸ 배수지‧침전지 청소 및 여과사 교체공사	: 3건 / 223백만원

▸ 왕궁배수지 사면 정비공사	: 1건 / 110백만원

▸ 정수시설물 정밀점검 용역	: 1건 /  80백만원

▸ 신흥정수장 수전설비 VCB 교체공사 등 전기설비 보수 : 2건 /  30백만원

▸ 신흥정수장 침전지 퇴수밸브 교체공사	: 1건 /  74백만원

▸ 정수시설 정밀안전진단 및 기술진단 보수사업	: 2건 /  70백만원

□ 추 진 계 획

◦ 현장조사 및 설계	: 2021. 1. ~ 3.

◦ 발주 및 착공	: 2021. 2. ~ 5.

◦ 공사준공	: 2021. 4. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 정수시설물 시설개선 및 효율적․경제적 운영으로 안정적인 정수생산

◦ 정수시설물의 보수‧보강으로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

7		정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

□ 사 업 개 요

◦ 원․정수 목표 수질 지정을 통한 수질관리 및 검사 강화

◦ 수돗물에 대한 신뢰도 확보를 위한 주민 홍보 강화

□ 추 진 계 획

◦ 원․정수 목표 수질 : 원수 BOD 2mg/L이하, 정수 탁도 0.15 NTU이하

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정 수질검사 기준	자체 수질검사 계획
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 26개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 26개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 관내 수도꼭지 수질검사 실시 : 매월 42개소(읍·면·동 인구비례)

◦ 상수원보호구역 수질관리계획 수립용역 : 2021. 1. ~ 9. / 20,000천원

▸상수원 보호구역 현장실사 및 수질관리 계획 수립

◦ 수돗물 품질보고서 발간 배부 : 10,000천원 (50,000부)

◦ 수질검사결과 홍보강화 : 홈페이지 및 내고장소식지 등

□ 기 대 효 과

◦ 원수 및 정수에 대한 철저한 수질관리로 시민에게 맑은 물 공급

◦ 상수원 보호구역의 각종 오염원에 대한 수질 관리계획 수립