2021. 1.

제233회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 계획

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 주 요 성 과 및 반 성
□	2021 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	체계적 시설 개선 및 악취관리로 시민친화형 하수처리시설 운영 사람과 안전중심의 지속가능한 공공하수도 정비 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	경쟁력 있는 시민 맞춤형 하수관로 정비사업 추진 친환경 하수처리장 운영을 통한 방류수질 개선 침수 우려지역 선제적 정비로 공공하수도 침수피해 예방

일  반  현  황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정  ․  현  원

(2021.1.4.기준)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	6	6	7	5
현 원	25	1	9	7	-	8
증 감			3	1	▵7	3

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	노후하수관로 정비사업, 시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과, 온천지구 관리

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2019. 12.	비 고
시설	총인구	천명	287
	하수인구	천명	270
	보급률	%	93.8
하수처리	1일평균하수발생량	톤	115,602
	1일평균하수처리량	톤	112,836
	하수처리율	%	97.6
하수도 사용	개소수	전	40,180
	톤당 평균요금	원	737.2

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	30	150,110㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	민간위탁 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	22	1,760㎥/일	〃
제3일반산업단지 공동 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	〃

2020 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 2021년 하수관로 정비사업 국고보조 신규 사업 확정

‣ 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 국비 6,054백만원 확보

‣ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역(2단계) 국비 397백만원 확보

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

‣ 남부2·3,북부2처리분구 하수관로 정비공사 추진(공정율 47%)

- 관로정비 21.8km, 배수설비 939개소

‣ 남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 추진(공정율 90%)

‣ 북부1처리분구 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 추진(공정율 42%)

‣ 황등리 배수설비 설치공사 외 4건(배수설비 20개소 설치완료)

◦ 공공하폐수처리장 효율적 운영을 통한 수질환경개선 및 악취방지대책 추진

‣ 익산공공하수처리시설 및 금강분뇨처리장 악취기술진단 실시

‣ 여산처리장 외 15개소 기능보강공사 및 여산하수 기술진단 실시

‣ 익산공공하수찌꺼기 감량화사업 탈취기 신설 및 악취대책 추진

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 소규모 공사 115건 처리 및 생활민원처리 257건 처리

‣ 시내일원 침수우려지역 12개소 등 하수도(L=66km) 기계준설 완료

‣ 생활민원 처리를 위한 비상근무조 운영 : 2,975건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 추진 시 행정절차(설계경제성 검토용역, 기술자문, 재원협의 등) 지연으로 공사 미착공

		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비공사 북부1 처리분구 하수관로 정비사업 하수찌꺼기 감량화 사업 공공하수처리시설 운영관리 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 노후하수관로 정비사업(2단계) 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 소규모 하수도시설 정비공사

2021 주요업무계획

1		남부2⦁3, 북부2 배수분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2019. 05. ~ 2022. 05.

◦ 사업내용 : 오수관로 정비 L=30.5km, 배수설비 2,616가구

◦ 총사업비 : 36,490백만원(국비  25,543 도비  1,094 시비  9,853)

※ 2021년 사업비: 4,781백만원(국비 3,347 도비 143 시비 1,291)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019	2020	2021	2022이후	비고
합계(100%)	36,490	14,843	1,447	4,781	15,419
국비( 70%)	25,543	9,830	1,013	3,347	11,353
도비( 3%)	1,094	420	43	143	488
시비( 27%)	9,853	4,593	391	1,291	3,578

□ 추 진 실 적

◦ 시설공사 1차분 준공	: 2020. 05. 27.

▸오수관로 정비 L=13.8km, 배수설비 317가구

◦ 시설공사 2차분 준공	: 2020. 12. 21.

▸오수관로 정비 L=8.0km, 배수설비 622가구

※ 전체 공정율: 47% (관로 21.8km, 배수설비 939가구)

□ 추 진 계 획

◦ 잔여구간 공사 추진	: 2021. 01. ~ 2022. 5.

▸오수관로 정비 L=8.7km, 배수설비 1,677가구

▸신용동, 동산동, 금강동, 영등1동, 평화동 일부

□ 기 대 효 과

◦ 시내일원 오·우수 분류식 하수관로 정비를 통한 생활환경개선 및 만경강수계 수질개선과 공공하수처리시설의 운영효율 제고

2		남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 사업기간 : 2019. 02. ~ 2024. 04.

◦ 사업내용 : 오수관로 정비 L=15.3km, 배수설비 1,290가구

◦ 총사업비 : 18,000백만원(국비  9,000 도비  900 시비  8,100)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019	2020	2021	2022이후	비고
합계(100%)	18,000	1,000	321	2,732	13,947
국비( 50%)	9,000	500	142	1,366	6,992
도비( 5%)	900	50	14	136	700
시비( 45%)	8,100	450	165	1,230	6255

□ 추 진 실 적

◦ 사업지구 노후관로 기술진단 시행	: 2018. 03. ~ 2018. 09.

◦ 2019 국고보조사업 확정	: 2018. 12. 26.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2019. 07. 24.

◦ 기본 및 실시설계 용역 일시중지	: 2020. 05. 08.

▸건설공사 필수 행정절차 이행(설계경제성 검토용역, 기술심의 등)

◦ 전북지방환경청 재원협의 요청	: 2020. 09. 22.

▸180억→389억 총사업비 변경 협의 진행중

□ 추 진 계 획

◦ 전북지방환경청 재원협의 완료	: 2021. 01.

◦ 공법선정위원회 개최	: 2021. 01.

◦ 시설공사 및 건설사업관리 발주	: 2021. 02.

◦ 시설공사 추진	: 2021. 04. ~ 2024. 04.

□ 기 대 효 과

◦ 시내일원 오·우수 분류식 하수관로 정비를 통한 생활환경개선 및 만경강수계 수질개선과 공공하수처리시설의 운영효율 제고

3		북부1처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 L=35.6km, 배수설비 2,648가구

◦ 총사업비 : 41,607백만원 (국비 29,125 도비 1,248 시비 11,234)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	41,607	714	6,209	12,482	12,482	9,720
국비( 70%)	29,125	500	4,346	8,737	8,737	6,805
도비( 3%)	1,248	21	186	374	374	293
시비( 27%)	11,234	193	1,677	3,371	3,371	2,622

□ 추 진 계 획

◦ 시설공사 발주전 행정절차 이행	: 2021. 03. ~ 08.

▸설계 경제성검토(VE)	: 2021. 02.

▸보수공법 선정위원회	: 2021. 03.

▸지방건설기술심의회	: 2021. 04.

▸환경부 재원협의	: 2021. 07.

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 발주	: 2021. 09.

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 착공	: 2021. 11.

□ 기 대 효 과

◦ 시내일원 오·우수 분류식 하수관로 정비를 통한 개인정화조 등에서 발생되는 악취발생 원인 제거 및 만경강수계 수질개선을 통한 쾌적한 생활환경 조성

4		하수찌꺼기 감량화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 10.

◦ 사업내용

▸소화조 개량(10,000㎥) 및 신설(6,692㎥) : 교반기 신설, 가온방식 변경

▸탈취시설, 기계식 농축시설, 가스 저장 및 정제설비, 저류조 등 신설

◦ 총사업비 : 26,844백만원(국비 18,791 도비 4,027 시비 3,441 기금 585)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	비고
합계(100%)	26,844	3,688	13,293	9,863
국비( 70%)	18,791	2,372	9,305	7,114
도비( 15%)	4,027	509	1,994	1,524
시비( 15%)	4,026	807	1,994	1,225

□ 추 진 실 적

◦ 시설공사(1차분) 완료	: 2019. 08. ~ 2020. 07.

▸전기실동 리모델링, 드럼스크린동 철거, 임시 탈수기동 설치

◦ 시설공사(2차분) 완료	: 2020. 04. ~ 2020. 12.

▸탈수기동 철거, 슬러지처리동 신설 등

□ 추 진 계 획

◦ 시설공사(잔여분) 추진	: 2021. 01. ~ 2022. 10.

▸전처리·혼합조 설비, 혐기성소화조 등 설치

◦ 기계식 농축시설 등 관급자재 계약	: 2021. 01.

□ 기 대 효 과

◦ ‘95년부터 가동된 익산공공하수처리장 슬러지처리시설의 노후화된 시설물을 보완하고, 탈취시설 신설 및 고효율 설비개선을 통한 쾌적한 주거환경 조성

5		공공하수처리시설 운영관리(BTO)

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소

하수처리시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
운영방식	위탁운영 [(주)전북엔비텍 BTO, 2008. ~ 2028.]

※ 2021년 BTO위탁운영비: 11,856백만원(도비 590백만원 시비 11,266백만원)

□ 추 진 계 획

◦ 익산 외 4개소 공공하수처리시설 수질관리(6개항목, 일1회)	: 연중

◦ 익산 외 3개소 수질TMS 정도검사	: 연중

◦ 익산 외 3개소 정기 점검(환경청)	: 연중

◦ 하수찌꺼기 성분 검사(연2회)	: 상·하반기

◦ 익산 외 4개소 분기별 복합악취농도 검사	: 분기별

◦ 익산 외 3개소 수질오염총량 할당시설 지도점검	: 분기별

◦ 익산공공하수(BTO) 운영관리 실태평가(환경청)	: 2021. 05. ~ 06.

□ 기 대 효 과

◦ 하수처리 기술과 노하우를 가진 전문 업체의 위탁운영으로 방류수 수질기준을 철저히 준수하고, 시민이 체감하는 양질의 하수도 서비스 제공

6		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 25개소

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량 (㎥/일)	600	1,760	85개소	5,500	5,000	4개소
운영방식	위탁운영[환경시설관리(주), (유)대신환경개발 2020.~2022.]

※ 2021년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비: 3,020백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하·폐수 원격감시제어 시스템 구축 완료	: 2020. 06. ~ 12.

◦ 소규모하수 기술진단에 대한 개선공사 완료	: 2020. 07. ~ 12.

◦ 여산공공하수 정밀안전점검 및 기술진단 완료	: 2020. 01. ~ 11.

□ 추 진 계 획

◦ 공공하·폐수처리시설 수질 및 운영관리

▸공공하·폐수처리시설 및 중계펌프장 운영(주 4~5회 수시점검)

▸처리시설 용량별 수질검사 6개 항목

검사주기	일1회	주1회	월1회
검사대상	500톤/일 이상	50~500톤/일	50톤/일 미만
개소수	3개소	12개소	10개소

◦ 폐수처리장 운영관리 실태평가(제3산단, 국가식품)	: 2021. 07.

◦ 공공하·폐수처리시설 복합악취측정	: 분기별

□ 기 대 효 과

◦ 관리대행 업체에 위탁운영 함으로써 전문적인 운영관리 및 시설의 효율적 운영․방류수질 기준 확보

7		익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동, 모현동, 송학동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2022. 12.

◦ 사업내용 : 노후우수박스 정비 L=2.61km

◦ 총사업비 : 12,109백만원(국비 6,054.5 도비 605 시비 5,449.5)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	비고
합계(100%)	12,109	220	1,000	10,889
국비( 50%)	6,055		500	5,555
도비( 5%)	605		50	555
시비( 45%)	5,449	220	450	4,779

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 실시	: 2016. 03.

◦ 실시설계비 220백만원 예산 반영(3회추경)	: 2020. 07.

◦ 2021년 국고보조사업 확정	: 2020. 09.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

□ 추 진 계 획

◦ 사업추진 공법 결정	: 2021. 02.

◦ 설계경제성(VE) 검토 용역 시행	: 2021. 04.

◦ 익산시 기술자문위원회 개최	: 2021. 05.

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2021. 08.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2021. 09. ~ 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 노후 우수박스정비를 통해 하수배제 기능을 개선하고, 침수피해·씽크홀 등의 안전사고 예방

8		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2022. 12.

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=21.4km

◦ 총사업비 : 15,080백만원(국비 7,540 도비 754 시비 6,786)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	2022 이후	비고
합계(100%)	15,080	186	1,000	2,000	11,894
국비( 50%)	7,540	0	500	1,000	6,040
도비( 5%)	754	0	50	100	604
시비( 45%)	6,786	186	450	900	5,250

□ 추 진 실 적

◦ 국가산업단지 하수관로 기술진단 실시	: 2019. 04.

◦ 설계경제성(VE) 용역 완료	: 2020. 09.

◦ 익산시 기술자문위원회 완료	: 2020. 09.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2020. 10.

□ 추 진 계 획

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2021. 01.

◦ 전라북도 원가심사 완료	: 2021. 02.

◦ 건설사업관리용역 업체 선정	: 2021. 03. ~ 2021. 04.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2021. 06. ~ 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 지하수 오염, 침수피해 및 지반침하 등의 안전사고를 예방하고, 하수배제 기능을 개선하여 공공하수처리시설의 효율성 향상

9		소규모 하수도 시설 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 2,074백만원 (시비)

◦ 사업내용	: 97건 / 2,074백만원

▸소규모 하수도시설 정비공사	: 44건 / 1,185백만원        ▸생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	: 21건 /   144백만원

- 함열읍 중촌마을 하수도 정비공사 외 20건

▸하수관로 기계준설	: 40건 /   745백만원

□ 추 진 계 획

◦ 상반기 공사 추진

▸소규모 하수도시설 정비공사	: 30건 / 830백만원

▸생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	: 21건 / 144백만원

▸하수관로 기계준설	: 28건 / 522백만원

◦ 하반기 공사 추진

▸소규모 하수도시설 정비공사	: 14건 / 355백만원

▸하수관로 기계준설	: 12건 / 223백만원

□ 기 대 효 과

◦ 슬러지 적체, 배수불량 등 하수의 흐름을 방해하는 요소를 사전에 제거하고, 시민 맞춤형 소규모 생활환경개선사업을 통하여 쾌적한 정주여건 조성