2021. 1.

제233회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 계획

	환경안전국

늘푸른공원과

□	비전 및 중점추진방향
□	일반현황
□	2020 주요성과 및 반성
□	2021 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 사람이 어우러진 푸른 익산 조성

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	자연 친화적 녹색도시 조성 안전하고 쾌적한 공원ㆍ녹지환경 조성 꽃향기 가득한 익산만들기

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	푸른 숲과 꽃이 어우러진 아름다운 도시미관 조성 삶의 질을 높이는 안전하고 쾌적한 녹색 휴식 공간 확충 시민이 체감하는 생활속 도시공원 확충 및 유지관리

일   반   현   황

□ 기          구

					늘푸른공원과
푸른숲조성			가로수환경					공원조성				공원관리

□ 정  ㆍ  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	16		1	4	2	5	4
현 원	16		1	5	3	0	7
증 감				1	1	△5	3

□ 사  무  분  장

◦ 푸른숲조성	:	도시숲 및 명상숲 조성, 학교공원화 사업, 초화류 재배 및 꽃길조성, 수목 및 양묘장관리, 산림서비스 도우미 지원, 미세먼지 차단숲 조성사업
◦ 가로수환경	:	가로수(중앙분리대) 및 가로화단 조성ㆍ관리, 병해충 방제(가로수,가로화단, 중앙분리대), 생활권 수목진료 민간 컨설팅
◦ 공원조성	:	공원·녹지조성계획 수립 및 시행, 공원조성 및 재정비사업, 공원리모델링 사업, 공원 조성에 따른 보상 및 등기 업무,공원사업 시행 인·허가 및 실시계획인가, 공원녹지 일시사용 승인 및 점용허가
◦ 공원관리	:	공원 조경시설물 설치 및 유지관리, 공원 수목식재 및 유지관리, 어린이 놀이시설설치 및 안전점검, 전기시설물 설치 및 유지관리, 공원 임시사용 승인, 조성된 공원불법행위 단속, 수경 시설물(분수, 실개천, 발물놀이터)유지관리

□ 공원 지정 현황

(2020.12.31.현재)

구 분	개 소	면적(ha)	조성(ha)	조성율(%)	비고
계	105	481	179.7	37.4
근린공원	46	432.7	136.5	31.5
어린이공원	39	9.0	9.0	100
기타공원	20	39.3	34.2	87

□ 녹지 현황

(2020.12.31.현재)

구 분	개 소	면적(ha)	조성(ha)	조성율(%)	비고
계	99	60.2	60.2	100
완충녹지	78	54.1	54.1	100
경관녹지	17	5.5	5.5	100
연결녹지	4	0.6	0.6	100

□ 가로수 현황

(2020.12.31.현재)

구 분	구 간	노선길이(㎞)	본 수(본)	비 율(%)	비 고
계	135	340	49,932	100	관목 (436,494)
시내구간	109	245	32,214	65
시외구간	26	95	17,718	35

※ 왕벚(29%), 이팝(16%), 은행(15%), 배롱(11%), 메타(8%), 기타(21%)

□ 도시숲 현황

(2020.12.31.현재)

구 분	개 소	면 적(ha)	비 고
계	68	12.4
쌈지공원	42	10.0
교통섬	26	2.4

□ 위원회 현황

(2020.12.31.현재)

구 분	구 성	근 거	비고
도시림등의 조성·관리 심의위원회	7명(당연직1, 위촉직6)	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	법령

2020 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 500만 그루 나무심기 사업 원활한 추진(목표달성률 144%)

▸수목식재 734,208그루 (공공부문 647,949 민간부문 86,259)

▸내 나무심기 운동(재난위기극복) 시민의 숲 대상지 발굴 및 토양개량

▸【민간부문】푸른익산가꾸기 공모사업, 자체 식재 등 10개 사업 추진

◦ 가로수, 도시숲 조성 및 관리로 쾌적한 녹색도시 미관개선

▸가로수 조성사업 5km(왕벚 380주 식재, 왕벚 전지 1,125주)

▸도시숲 조성 4개소, 명상숲 조성 8개소, 학교 공원화 사업 5개소

◦ 명품가로숲길 조성으로 녹색네트워크 구축 추진

▸모현동 명품가로숲길 조성사업 1.1km(느티나무 등 7종 11,286주 식재)

▸어양동 명품가로숲길 조성사업 0.9km(남천 등 16종 11,918주 식재)

◦ 아름다운 도시경관 조성사업 추진

▸자연 친화적 감성 꽃거리 조성 : 시 경계 진입로 등 5개소 30km 등

▸꽃향기 가득한 익산 만들기 : 540개 기관 및 학교 초화류 21만 본 지원

▸전북대학교 특성화 캠퍼스 내 5,000㎡ 꽃밭조성

◦ 공원 시설물 안전관리 강화로 범죄 사전 예방

▸공원 화장실 불법 촬영 카메라 점검 : 52개소(매월1회) 점검

▸여성화장실 안심벨 신규 설치 : 30개소

□ 반      성

◦ 사업추진 시 상대성 민원에 따른 이해충돌 및 시기별 민원 집중에 따른 신속 처리 지연

▸이해설득을 위한 적극적 행정 및 사전 조치를 통한 민원 발생 최소화

2021 주요업무계획

		500만 그루 나무심기사업
		가로수 조성 및 유지관리
		꽃향기 가득한 익산만들기
		배산공원 조성사업
		인화공원 무장애나눔길 조성사업
		도시공원 및 녹지관리

1		500만 그루 나무심기 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 가로변, 공원, 완충녹지, 유휴토지, 학교 등 도심전역

◦ 사업기간 : 2019. ∼ 2023.(5개년)

◦ 사업비/사업량 : 363억원 / 505만그루 (공공 481만, 민간 24만)

◦ 사업내용 : 도시숲 등 수목 식재, 시민과 함께하는 나무심기 등

◦ 연도별 식재 계획                                        (단위 : 주)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	계
계	418,114	508,040	600,386	1,414,352	2,110,789	5,051,681
공공부문	358,659	454,560	559,708	1,350,305	2,092,424	4,815,656
민간부문	59,455	53,480	40,678	64,047	18,365	236,025

▸‘19~’20년 식재 실적 : 1,152,322주 (공공 1,006,608, 민간 145,714)

◦ 연도별 투자계획                                     (단위 : 백만원)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	계
총 계	5,037	8,194	7,987	8,515	6,588	36,321
국 비	1,379	768	1,200	1,210	1,250	5,807
도 비	116	1,520	1,720	1,730	1,500	6,586
시 비	3,542	5,906	5,067	5,575	3,838	23,928

□ 추 진 계 획

◦ 500만 그루 나무심기 사업 지속 추진 및 유지관리	: 2021. 1.~ 12.

▸도시숲 조성 및 정비(12억원), 미세먼지 차단숲 조성(18.8억원)

▸무궁화 동산(1억원), 스마트가든(1.2억원), 명상숲 조성(3억원)

▸유휴부지 수목식재(4억원), 민간정원 정비사업(2억원)

▸가로수 및 명품가로숲길 조성, 자녀안심 그린숲 조성, 공원 및 녹지 수목식재 등

▸민간부문 푸른익산가꾸기 추진, 협업부서 수목식재

▸시민참여 사업 추진 : 나무 나누어주기(공동체ㆍ시민), 내 나무 심기(시민의숲)

□ 기 대 효 과

◦ 도시화·산업화로 인한 미세먼지, 열섬 현상 등 기후변화에 선제적으로 대응

◦ 생활권 내 도시숲 조성 및 질적 관리 강화로 건강한 생활환경 조성

2		가로수 조성 및 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치

▸가로수 및 명품가로숲길 조성 : 금강동 대간선수로 2km, 서부역사 진입로 2km

▸자녀안심 그린숲 조성 : 오산 영만초 외 1개소

▸가로수 유지관리 : 하나로 등 120개노선 340km

◦ 사업기간 : 2021 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,273백만원(국비 50, 도비 400, 시비 823)

◦ 사업내용 : 가로수․명품 가로숲길 및 자녀안심 그린숲  조성, 유지관리

□ 추 진 계 획

◦ 가로수 조성 및 명품가로숲길 조성

▸실시설계용역	: 2021. 1. ~ 2.

▸계약심사 및 설계심의	: 2021. 3.

▸공사 착공 및 준공	: 2021. 3. ~ 6.

◦ 자녀안심 그린숲 조성(오산 영만초, 부송 궁동초)	: 2021. 3. ~ 5.

◦ 가로수 유지관리

▸가로화단 정비(군익로 등 가로수 보식, 무왕로 등 지피식물 식재 등)	: 2021. 3. ~ 12.

▸가로수 수형조절(지하고 높임, 가지 솎아주기), 융기된 뿌리정비, 열매(은행) 제거 및 민원처리 등	: 2021. 2. ~ 12.

◦ 병해충 방제작업, 생활권 수목진료 민간컨설팅 추진	: 2021. 2. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 쾌적한 가로환경 조성으로 도심권 내 녹지공간 확보 및 녹색 인프라 확대

◦ 체계적인 가로수 관리를 통한 안전하고 아름다운 도시경관 창출

3		꽃향기 가득한 익산만들기

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산대로 등 주요도로변

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사 업 명 : 꽃향기 가득한 익산만들기

◦ 사 업 비 : 598백만원(인건비 465, 재료비 51, 시설 45, 자산 5, 운영비 32)

◦ 사업내용

▸시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진

▸특화거리 및 꽃길조성, 각종 축제지원, 계절별 꽃 생산 및 식재

□ 추 진 계 획

◦ 계절별 초화류 생산 (팬지 등 16종 100만본)	: 2021. 1. ~ 12.

◦ 꽃길조성	: 2021. 1. ~ 12.

▸주요 도로변 : 익산대로 등 5개 노선 약 30km

▸특 화 거 리 : 익산역~구경찰서, 익산역~터미널, 익산시청 주변 2km

▸시경계 및 주진입로 : 익산IC, 송학사거리~임피 2km

▸시 외 구 간 : 금마, 왕궁 주변등  4개소 14km

◦ 시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진	: 3회(3월, 6월, 9월)

▸계절별 초화류 나누어주기 행사 : 22만본 지원

◦ 전북대학교 유휴부지 솜리 캠퍼스 꽃밭조성	: 2021. 3. ~ 11.

▸마동 199-1번지(전북대학교 익산캠퍼스 내, 5,000㎡)

◦ 전라북도민체전 대비 꽃길조성	: 2021. 2. ~ 5.

▸꽃묘 생산 및 식재, 대형화단 및 꽃길조성(메리골드 등 5종 30만본)

◦ 각종 축제 지원(국화축제, 서동축제 등)	: 2021. 2. ~ 11.

□ 기 대 효 과

◦ 계절별 꽃식재로 아름다운 익산시 도시 미관 조성

◦ 도시 경관 개선을 통해 시민과 방문객에게 볼거리를 제공

4		배산공원 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 모현동2가 산9-1번지 일원 배산근린공원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 10.

◦ 사 업 비 : 800백만원(1단계 200, 2단계 600)

◦ 주요내용

▸(1단계) 맞이공간 꽃길·화단 조성, 운동시설 정비(봄맞이 꽃길 조성)

▸(2단계) 노후 산책로 울타리 및 휴게·편익시설 정비(산책로 및 시설물 정비)

□ 추 진 계 획

◦ 1단계 봄맞이 꽃길조성사업 설계용역	: 2021. 1. ~ 2.

◦ 1단계 봄맞이 꽃길조성사업 추진	: 2021. 3. ~ 4.

◦ 2단계 산책로 및 시설물정비사업 설계용역	: 2021. 4. ~ 5.

◦ 2단계 산책로 및 시설물정비사업 추진	: 2021. 6. ~ 10.

□ 기 대 효 과

◦ 생활권 내 도시공원 정비로 자연친화적 여가 공간 제공

▸2020년 7월 도시공원 일몰제로 7개소(486,910㎡) 해제됨에 따라 생활권 근린공원의 정비 요구 시급

◦ 생태환경과 주변 경관을 고려한 시설물 정비로 시민의 안전과 편의 증진 도모

5		인화공원 무장애나눔길 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : (구)동익산역 ~ 춘포역 일원(인화공원)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 667백만원 [도비(기금) 60%, 시비 40%]

◦ 주요내용

▸무장애나눔길 조성 설계 전문가 자문

▸광야 풍경길(흙콘크리트, L=1.3km, B=6.0m) 조성

▸무장애나눔길 쉼터 조성 등

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 용역 및 전문가 자문	: 2021. 1. ~ 3.

◦ 지역주민 설명회 및 계약심사 실시	: 2021. 3. ~ 4.

◦ 공사 발주 및 착공	: 2021. 4.

◦ 공사 완료	: 2021. 6.

◦ 주민 만족도 조사	: 2021. 6. ~ 8.

□ 기 대 효 과

◦ 인화공원, 유천생태습지 등과 연계하여 시민의 공원 이용 활성화

◦ 보행약자층이 길을 이용할 수 있도록 개선하여 산림체험 및 치유 등의 산림복지서비스 제공

6		도시공원 및 녹지관리

□ 사 업 개 요

◦ 관리대상 : 148개소 355ha(공원 80개소 314ha, 녹지 68개소 41ha)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,739백만원(시설관리 952, 수목관리 787)

◦ 사업내용 : 공원시설물 설치 및 유지보수, 수목식재 및 관리

□ 추 진 계 획

◦ 공원 및 녹지 노후·파손 시설물 유지보수	: 2021. 1. ~ 12.

▸운동시설, 의자, 배수로, 산책로, 화장실, 기타 시설 등

◦ 공원시설물 안전점검	: 2021. 1. ~ 12.

▸어린이 놀이기구 안전점검	: 40개소, 매월/1회

▸놀이터 모래소독(기생충란, 중금속)	: 23개소, 연/2회

▸공원 내 공중화장실 불법 촬영 카메라 점검	: 52개소, 매월/1회

▸공원 전기시설 안전진단 (한국전기안전공사)	: 84개소, 연/1회

◦ 체육시설(축구장, 다목적구장) 개선 사업	: 2021. 1. ~ 6.

▸조명탑 설치 및 포장(2개소)

◦ 수목·야생화 식재관리 및 제초	: 2021. 1. ~ 12.

▸수목식재, 야생화 식재, 수목전지, 비료주기, 병해충방제, 풀매기, 예초 등

◦ 수경시설 운영 및 수질관리	: 2021. 6. ~ 9.

▸분수 6개소, 발물놀이터 1개소, 실개천 3개소

□ 기 대 효 과

◦ 건강하고 쾌적한 공원환경 개선으로 시민의 삶의 질 향상

◦ 시설물 안전점검 강화로 범죄 사전 차단 및 안전사고 방지